2009. 1.

주 요 업 무 보 고

도   시   과

보  고  순  서

□ 일 반 현 황
□ 2008년 주요업무성과
□ 2009 중점추진 방향
□ 주요업무 추진계획
○ 주요업무 추진
	- 남원 도시계획수립 및 관리
	- 개발촉진지구지정 및 개발계획 수립
	- 도통1･2택지개발지구 지구단위계획 수립
	- 도시관리계획 지형도면 고시
	- 도시 가로망 확충사업
	- 금동간선･서문~신정 대로 개설사업
	- 공무원교육원 진입로 개설
	- 천주교 주변 도로구조 개선
	- 안전한 보행환경 조성사업
	- 가로등 설치 및 유지관리
	- 운봉 소도읍 육성사업
	- 남원 일반산업단지조성
	- 지리산 자생식물환경공원 조성
	- 허브테마파크 조성 사업
	- 주요 민자사업 도시관리계획 추진현황
	- 읍･면지역 도로명사업 추진
	- 지리정보시스템(GIS) 안정적 운영

일 반 현 황

□ 기  구

						도시과장
						윤 영 복
도 시 계 획						도 시 정 비							시 설 개 발								지 리 정 보
박 종 주						조 남 도							김 회 정								심 재 현
◦도시계획 수립 ◦도시계획시설 결정 및 인가 ◦개발촉진지구 개발계획수립 ◦개발행위허가 ◦기반시설부담금 ◦전문건설업관리 ◦가로등 관리						◦도시가로망사업 시행 ◦자전거 이용도로정비 ◦시의 국도정비 ◦시의 시도정비 ◦전선지중화사업 ◦시가지정비사업							◦지리산 자생식물 환경공원 조성 ◦택지개발 사업 ◦온천개발업무 ◦일반산업단지 조성 ◦허브밸리조성 ◦소도읍 육성사업								◦새주소 사업 ◦도로명종합계획 수립 ◦도로와 지하시설물(GIS)전산화 ◦도시기준점관리 ◦수치지형도제작 및 관리

□ 인  력(정원/현원)

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	비고
계	24/21	1/1	5/4	8/5	6/5	0/0	4/6	( 1 )
도시계획	11/11	1/1	2/1	2/2	2/1		4/6	1(일용)
도시정비	5/4		1/1	2/1	2/2	0/0
시설개발	5/3		1/1	2/0	2/2
지리정보	3/3		1/1	2/2
결 원	△3	-	△1	△3	△1	-	2

□ 도시관리계획

(단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	29.87 (4.0)	266.60 (35.4)	348.04 (46.2)	108.30 (14.4)

□ 도시지역 (용도지역별)

(단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일반	준주거	일 반 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	29.871 (100%)	0.063 (0.2)	6.328 (21.1)	0.02 (0.1)	0.987 (3.3)	0.564 (1.9)	20.924 (70.0)	0.985 (3.3)
남 원	25.871 (100%)	0.063 (0.3)	5.335 (20.6)	0.015 (0.1)	0.809 (3.1)	0.564 (2.1)	19.085 (73.8)	- (0)
운 봉	1.66 (100%)	-	0.508 (30.6)	-	0.095 (5.7)	-	0.695 (41.9)	0.362 (21.8)
인 월	2.34 (100%)	-	0.485 (20.8)	0.005 (0.2)	0.083 (3.5)	-	1.144 (48.9)	0.623 (26.6)

□ 도로현황 (도시계획시설)

(단위 : ㎞)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설율 (%)
	노선수	연장	노선수	연장	노선수	연장
계	552	180.1	243	105.6	309	74.5	58.6
대 로	29	54.2	10	41.5	19	12.7	76.6
중 로	80	50.1	34	27.7	46	22.4	54.3
소 로	443	75.8	199	36.4	244	39.4	48.0

※ 개설율 - 전북도  6시 평균 : 73.7% (정읍 51%, 김제56.9%)

□건설업체현황

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		일반건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
285	437	250	396	202	338	48	58	35	41

2008년 주요성과

	주요성과
◦2025 남원도시기본계획 승인 ◦도시 및 관광기반시설 확충 ◦산업 및 관광인프라 구축 ◦대민행정서비스 향상 제고

□ 체계적인 국토이용계획 수립

◦ 2025남원도시기본계획수립 완료 : 국토해양부 ‘08. 5. 6 승인

◦ 관리지역세분 완료 : 기업유치가 용이한 계획관리지역 47.6%

◦ 개발촉진지구지정 및 개발계획 수립 추진 : ‘09. 2월말 승인 예정

▶ 국토해양부 승인신청 : ‘08. 9. 22(3개분야 15개사업 500억원)

□ 시민의 쾌적한 삶을 위한 도시기반시설 확충 ⇒ 29 개노선 14㎞

◦ 대    로 :  4개노선  2,810m       ◦ 중    로 :  6개노선  3,190m

◦ 소    로 :  8개노선  1,580m       ◦ 기    타 : 11개노선  6,665m

□ 산업 및 관광 인프라 구축 사업추진

◦ 지리산 자생식물 환경공원 조성사업 추진 : 98%

◦ 허  브  테  마  파  크   조  성 : 98%

◦ 운봉읍 : 소도읍 기반시설확충 및 레포츠시설 조성 : 71%

◦ 일반산업단지 조성 기틀 마련 : 협약체결, 개발계획 용역중(토지공사)

□ 대민행정 서비스 향상을 위한 한걸음 빠른 민원처리

◦ 개발행위 허가 신속처리 : 203건 896,437.1㎡

◦ 고장가로등 신속 보수․정비 : 1,647건(도시 959건 농촌 688)

◦ 전문건설업 등록 및 신고 : 170건

2009 중점 추진 방향

	기 본 목 표
○ 시민이 살기 좋은 도시공간 조성을 위한 도시계획 수립 ○ 자연환경과 도시환경이 어우러진 생태도시 구축 ○ 관광자원과 연계되는 체험 관광 기반시설 조성

⇩

	중 점 추 진 방 향
○ 도시공간조성 기틀 마련		-	재정비 고시, 민자사업 도시관리계획 수립
○ 쾌적한 도시환경조성		-	환경친화적인 도시가로망 및 전선지중화 정비
○ 관광기반시설 확충		-	허브밸리 및 자생식물공원 조성 마무리

⇩

BEST Namwon 2009

남원 도시계획수립 및 관리

□ 사업개요

◦ 대상지역 : 752.81㎢ (도시4.0%, 관리35.4%, 농림46.2%, 자연환경14.4%)

◦ 수립내용

- 도시기본계획 정비 : 2025년 목표계획 수정(20년 단위)

- 도시관리계획 재정비 : 5년 단위 재정비

･ 용도지역･용도지구의 지정, 변경에 관한 계획

･ 기반시설의 설치･정비 또는 개량에 관한 계획

･ 지구단위계획에 대한 지정 또는 변경에 관한 계획

- 관리지역: 263.63㎢에 대한 계획･생산․보전 관리 세분

◦ 사업기간 : ‘04. 4. ～ ’09. 2

□ 추진실적

◦ 2025년 남원 도시기본계획 수립 완료 : 국토해양부 승인 : ‘08. 5. 6

◦ 관리지역 세분 완료 ┌ 계획관리지역 : 125.54㎢ (47.6%)

│

(2008.12.26)       ├ 생산보전지역 :  63.41㎢ (24.1%)

│

├ 보전관리지역 :  62.06㎢ (23.6%)

│

├ 농림지역편입 :   0.52㎢ (0.2%)

│

└ 미 세 분지역 :  11.98㎢ (4.5%)

※ 산지이용구분도 불일치 지역 : 추후 세분 추진

◦ 도시계획재정비 - 각 동 및 주민의견청취 신설 또는 폐지반영 검토

□ 금후계획

◦ 도시계획 재정비 추진 : 1월중 재정비(안) 내부보고 및 주민 공람공고

개발촉진지구지정 및 개발계획수립

□ 사업개요

◦ 지정형식 : 낙후지역형

◦ 신청면적 : 144.01㎢

◦ 사업기간 : 2007～2016년(10개년)

◦ 사업내용 : 3개분야 15개사업(기반시설 5개노선 500억원)

◦ 근거법률 : 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률

□ 추진경위

◦ 당초 남원시가 개발촉진지구 지정 대상이었으나 관련법 개정으로 지정

대상에서 제외되었음. 추후 법이 개정되면서 당초에 포함되었던 시군은

‘07. 6. 30까지 신청 시 지정이 가능하도록 하는 경과조치 규정에 따라 추진

□ 추진실적

◦ 개발촉진지구지정 최초 신청(시→국토부) : ‘07. 6. 20

◦ 사업계획 보완 : 주민공람공고, 도시계획위원회, 사전환경성검토 등

◦ 개발촉진지구 보완 승인신청 : ‘08. 9. 22(중앙 35개 기관·부서 협의 중)

□ 금후계획

◦ 중앙도시계획위원회 심의

◦ 지구지정 및 개발계획(안) 승인 고시 - 2010 국가예산 확보 대상

도통 1ㆍ2택지개발지구 지구단위계획 수립

□ 사업개요

◦ 용 역 명 : 제1종지구단위계획 수립 용역

◦ 대상지역 : 167,219㎡

- 1지구 : 99,813㎡(시청일원), 2지구 : 67,406㎡(고속터미널일원)

◦ 준공일자 : 1987. 12. 31(한국토지공사 시행)

◦ 사업내용 : 기반시설 계획, 토지이용계획, 건축계획 정비 등

※ 택지개발사업 완료 후 10년 경과된 지역 제1종 지구단위계획으로

관리 대상

◦ 용 역 비 : 430백만원 (2009 예산 : 1억원)

◦ 사업기간 : ‘09. 1 ～ 12월

□ 추진계획

◦ 용역설계 및 발주(사업수행능력평가)          :      ‘09. 1 ～ 4

◦ 용역시행 : 총괄발주(미 확보액 추경 확보)     :      ‘09. 5 ～ 8

◦ 도시관리계획(지구단위계획) 결정절차 이행    :      ‘09. 9 ～ 12

□ 기대효과

◦ 도시계획시설 변경 및 토지이용계획 변경 가능하여 민원해소

◦ 택지개발 완료지구의 토지이용을 합리화하고 그 기능을 증진시켜 미관

개선 및 양호한 환경을 확보하여 체계적ㆍ계획적으로 관리

도시관리계획 지형도면 고시

□ 사업개요

◦ 대상지역 : 752.81㎢(남원시 행정구역 전체)

◦ 사업내용

- 도시관리계획(5년마다 재정비) 결정사항 지형도면조서 및 도면작성

┌ 도시지역 : 지적이 표시된 1/1,200 지형도

│

└ 비도시지역 : 1/5,000 지형도 작성

- 최초 도시계획결정고시부터 현재까지 도시계획관리 이력정보 구축용역 시행

◦ 용 역 비 : 1,043백만원

구 분	총사업비	기투자 (2008 까지)	2009년	이 후
사 업 비	1,043	719	324	-

◦ 용역기간 : ‘07. 4. 27 ～ ’09. 5(20개월)

□ 추진계획

◦ 도시관리계획(재정비) 결정사항 지형도면 고시도 작성 및 고시 : 2009. 5

◦ 도시계획정보체계(UPIS) DB 전산화 구축완료

□ 기대효과

◦ 도시관리계획(재정비) 수립 결정고시 이후 법적절차 이행 완료

◦ 도시계획 결정사항 이력구축 완료로 신속하고 정확한 대민서비스 제공

도시 가로망 확충사업

□ 사업개요

◦ 사업대상 : 도시계획으로 결정된 도로 개설

◦ 사 업 량 : 16개 지구   (L= 7,698m   B=6～35m)

◦ 사업기간 : 2004년 ～ 2014년 (10개년)

◦ 사업계획

(단위: 백만원)

구 분	사 업 량	총사업비	2008년 까지 투자	2009계획	2010이후
계	16개 지구	37,400	13,845	11,490	12,065
대 로	4개 지구 L=2,847m B=35m	22,500	8,160	8,290	6,050
중 로	5개 지구 L=2,860m B=15～20m	10,850	4,185	1,600	5,065
소 로	7개지구 L=1,080m B= 6～8m	4,050	1,500	1,600	950

□ 추진계획

◦ 시가지내 도로 기하 구조상 개선이 요구되는 지점 개량 ⇒ 천주교 3가

◦ 당면사업으로 요구되는 사업위주 가로망사업 추진

- 주공 국민임대아파트 입지에 따른 금동～간선간 도로 개설

- 교통 체증 해소가 시급한 서문～신정간 집중투자

- 2009. 12 입주 예정인 공무원교육원 진입로 개설 추진

◦ 남원여고 앞 4차선 개설로 서부권 도로기반시설 확충

2009년도 도시가로망 지구별 사업계획

□도시 가로망 개설사업                                        (단위:백만원)

구분	지 구 명	위치	사업량	총 사업비	2007 까지	2008 년도	2009 계획	2010 이후	비고 (추진계획)
계			16지구	37,400	4,545	9,300	11,490	12,065
대로	소 계		4지구	22,500	1,260	6,900	8,290	6,050
	금동 간선	금동 조산동	L=770m B=35m	6,500	1,000	3,000	1,790	710	·보상완료 ·공사추진
	서문～신정	금동 왕정동	L=670m B=35m	8,000	-	2,000	2,500	3,500	·보상추진 ·공사추진
	공무원교육원 진 입 도 로	향교동	L=1,370m B=15～25m	6,500	260	1,900	2,500	1,840	·보상완료 ·공사추진
	천주교주변 도로구조개선	쌍교동	L=37m B=23m	1,500	-	-	1,500	-	·보상완료 ·공사완료
중로	소 계		5지구	10,850	2,685	1,500	1,600	5,065
	남원여고 앞	왕정동	L=990m, B=20m	4,800	1,485	600	500	2,215	·보상완료 ·공사추진
	조산동 중로	조산동	L=550m, B=15m	2,200	500	300	300	1,100	·보상완료 ·공사추진
	새터중로개설	신정동	L=600m, B=20m	2,300	200	200	150	1,750	·보상완료 ·공사추진
	숙호 도로	왕정동	L=520m, B=15m	1,100	500	200	400	-	·공사완료
	송동~노암간 중로개설	노암동	L=200m B=15m	450		200	250	-	·공사완료
소로	소 계		7지구	4,050	600	900	1,600	950
	인월 소로	인월면	L=240m, B=6m	600	200	100	150	150	·보상완료 ·공사추진
	구 경찰서뒤 소로	향교동	L=160m, B=8m	600	100	300	200	-	·보상완료 ·공사추진
	조산8통 소로	조산동	L=160m, B=8m	600	200	200	200	-	·보상완료 ·공사추진
	향교2통 소로	향교동	L=120m, B=6m	450	100	200	150	-	·보상완료 ·공사추진
	죽항리버사이드 소로	죽항동	L=190mB=8m	900	-	100	400	400	·보상완료
	공설시장소로	금동	L=150mB=6m	600	-	-	200	400	·보상추진
	새집앞소로	금동	L=60mB=6m	300	-	-	300		·공사완료

□ 도시가로망 유지관리사업

구분	지 구 명	위치	사업량	총 사업비	2007 까지	2008 년도	2009 계획	2010 이후	비고 (추진계획)
시설정비	소 계		20지구	6,503		685	3,818	2,000
	도로구조정비	남원시일원	6개소	408	-	180	228		․공사추진
	시가지인도정비	남원시일원	4개소	280	-	130	150		․공사추진
	도시미관시설정비	남원시일원	5개소	215	-	75	140		․공사추진
	자전거도로정비	남원시일원	5개노선 (충정로,용성로,요천로,의총로,춘향로)	600	-	300	300		․공사추진
	안전한 보행환경 조성	용성로	L = 540m	5,000	-	-	3,000	2,000	․공사추진

금동간선 ․ 서문~신정 대로 개설사업

□ 사업개요

◦ 위  치 : 한일주유소 ～ 남원교육청 ～ 서문로터리

◦ 사업비 : 14,500백만원

◦ 지구별 사업조서

(단위:백만원)

사업명	구 간	사업량	총 사 업 비			투자 실적 및 계획			비 고
			총 계	공사비	보상비	2008 까지	2009	2010 이후
총 계	2개소	L=1,370m	14,500	7,000	7,500	6,000	4,290	4,210
금동간선 대로개설	한일주유소 ～남원교육청	L=770m B=35m	6,500	3,200	3,300	4,000	1,790	710	2005～ 2010
서문～신정 대로개설	남원교육청 ～서문로터리	L=670m B=35m	8,000	3,800	4,200	2,000	2,500	3,500	2008～ 2010

□ 추진계획

◦ 금동간선 대로 : 미협의 토지 8필지(6인) 수용추진,

◦ 서문～신정간대로 : 토지보상 협의와 병행 하반기 공사 발주

◦ 구 철도부지중 도로 미편입 부지 1,860㎡ 용지매입 후 주차장 또는 화단 조성

□ 기대효과

◦ 시장4가를 중심으로 한 교통체증 해소로 교통편익 증진

◦ 서부지역 기반시설 확충으로 균형발전 도모

◦ 도시가로망 확충으로 쾌적한 도시환경 조성

◦ 장기미집행시설(도로) 민원 및 숙원 해결

공무원교육원 진입로 개설

□ 사업개요

◦ 위  치 : 의총교(만인의총) ～ 산곡동(서부우회도로)

◦ 사업비 : 6,500백만원(도비190, 시비6,310)

◦ 지구별 사업조서

(단위:백만원)

사업명	구 간	사업량	총 사 업 비			투자 실적 및 계획			비 고
			총 계	공사비	보상비	2008 까지	2009	2010 이후
총 계	2개소	L=1,368m	6,500	5,300	1,200	2,160	2,500	1,840
공무원교육원 진입도로	의총교 ～산곡동	L=1,368mB=15～25m	6,500	5,300	1,200	2,160	2,500	1,840	2008 ～2010

□ 추진계획

◦ 시한성 사업임을 감안 토공작업 동절기 지속 시공

- 상･하수도 부설 병행 시공

◦ 미협의 토지 11필지(11인) 수용 병행추진

◦ ‘09. 6까지 공무원교육원 주 진입도로 완료(L=188m, B=15.0m)

□ 기대효과

◦ 공무원교육원생 진출입 원활 도모

◦ 가로망 확충으로 교룡산성을 중심으로 한 쾌적한 도시환경 기반 조성

천주교 주변 도로구조 개선

□ 사업개요

◦ 위  치 : 쌍교동 천주교 주변(천주교 3가 ⇔ 요천로)

◦ 사업비 : 1,500백만원

◦ 사업량 : L = 37m B = 23m

◦ 사업기간 : 2009. 1 ～ 10

□ 추진계획

◦ 기본 및 실시설계 : 2009. 2월 완료

◦ 보상계획통보 및 열람공고 : 2009. 1

◦ 사업 완공 ┌ 도로개설 : 2009. 4월내 완공

│

│

└ 주변(소공원) 개발 : 2009. 10

□ 기대효과

◦ 도로 기하구조 개선으로 안전운행 및 교통사고 예방

◦ 유휴 도로부지를 소공원화 하여 쾌적한 도시환경 제공

안전한 보행환경 조성사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 용성 4가 ⇔ 동문 4가

◦ 사 업 량 : L = 0.54㎞

◦ 총사업비 : 5,000(국비2,500, 시비2,500)

◦ 사업기간 : 2009. 1 ～ 8. 30

◦ 2009 사업비 : 3,000백만원(국비 2,500, 시비 500)

□ 추진계획

◦ 실시설계 및 문화재 지표조사 : ‘09. 1 ～ 3

◦ 한전 지중화설계 및 사업 협약 : ‘09 4 ～ 5.

◦ 사업지구내 굴착 및 복구(한전) : ‘09. 6 ～ 7

◦ 굴착부 포장 (남원시) : ‘09. 8

◦ 케 이 블  설 치 (한 전) : ‘09. 8. 30

□ 기대효과

◦ 무질서한 주차, 전신주 및 공가류와 광고물 정비, 차도와 인도 분리로

보행자 안전 확보

◦ 노후된 상수도, 우․오수 관로 정비로 수질개선 및 누수방지

가로등 설치 및 유지관리

□ 사업개요

◦ 가로등수 : 10,072등 (도시4,176, 농촌5,896)

◦ 사 업 량 : 1,830등 (신설․정비 280, 재해보수 50, 유지보수 1,500)

◦ 사 업 비 : 345백만원(시비)

- 신설 및 정비 : 250백만원(신설 180백만원(180등), 정비 70백만원(100등))

- 재해우려 가로등 : 50백만원 (50등)

- 유지보수 : 45백만원 (1,500등, 재료비)

□ 추진계획

◦ 읍면동에서 요청한 신설가로등 조기집행 : ‘09.  1 ～ 5

◦ 실버걷기운동코스 및 읍･면 소재지권 가로등 설치 : ‘09.  1 ~ 8

◦ 주민불편신고사항(유지보수) 신속 처리

□ 기대효과

◦ 보건소에서 요청한 실버걷기운동 코스 가로등 설치로 노약자 건강

증진 및 보행안전 확보

◦ 면 소재지권 최소한의 소요 가로등 설치로 밝은거리 조성

◦ 감전사고 대비 재해우려 가로등 보수로 안전사고 방지

◦ 가로등 민원 신속 해결로 주민생활 편익에 기여

운봉 소도읍 육성사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 일원

◦ 사업기간 : 2004 ～ 2009 (6년)

◦ 총사업비 : 20,000백만원(균특5,000 교부세5,000 도비5,000 시비5,000)

- 2009 예산액 : 6,283(도비 1,325  시비 4,958)

◦ 전체공정 : 71 %(잔여공정 : 레포츠조성사업)

□ 추진계획

◦ 미확보된 시비 및 도비 전액 확보 공사 마무리

◦ 2008집행 사고이월 사업비 마무리

- 북천중로개설공사 추진 : ‘08. 11 ～ ’09. 4

- 서림공원 체련시설 조성 사업 추진 : ‘08. 10 ～ ’09. 4

□ 기대효과

◦ 읍지역을 종합적․체계적개발로 지역경제 활성화

◦ 도시기반시설 확충으로 정주여건을 개선 중추도시로 육성.

◦ 도․농간 균형발전을 통한 중심축으로서의 역할제고

남원 일반산업단지조성 사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 (지당, 정송, 영천) 일원

◦ 면    적 : 992천㎡ (300천평) / 사업기간 : 2007 ~ 2013

◦ 사 업 비 : 527억원 (시비 17, 민자 510 )

◦ 사업시행자 : 한국토지공사

◦ 유치업종 :  자동차 부품산업, 첨단산업(전자․IT), 기계, 문화관광산업

□ 추진실적

○ 타당성조사 완료                             : ‘07. 11. 20

○ 산업단지 개발 기본협약체결(남원시↔토공)     : ‘08.  7. 18

○ 토지거래허가구역 지정(1,508천㎡)             : ‘08.  8. 18

○ 개발계획 용역 착수                          : ‘08.  8 ~ ’09. 9

○ 항공측량 및 기초 조사 완료                  : ‘08.  9 ~ ’08. 11

□ 금후계획

○ 토지이용계획 및 지구계 확정                  : ‘09. 1

○ 산업단지 투자사업 심의(토지공사 본사)        : ‘09. 3 ~ ’09. 7

○ 산업단지계획 일괄 용역 수행 (개발계획+실시계획) : ‘09. 9 ~ ’10. 8

( 각종 영향평가, 실시설계, 지구단위계획, 에너지 계획 등)

○ 산업단지계획 승인 신청 및 사업승인          :  ‘10.12 ~ ’11. 5

○ 산업단지 착공 및 준공(용지보상 병행)             :  ‘11.10 ~ ’13.12

지리산 자생식물환경공원조성

□ 사업개요

◦ 조성면적 : 116,268㎡

◦ 사 업 비 : 7,800백만원(균특 2,340 도비 1,415 시비 4,045)

- ‘08예산액 : 1,944백만원 (균특 120  도비 500  시비 1,324 )

◦ 사업기간 : 2003 ～2009

◦ 주요시설 : 주광장, 허브, 향기, 암석원, 벽천3개소, 유리온실등

□ 추진실적

◦ 토목. 건축공사 : 100%완공

◦ 유리온실 초화류 재배 (매발톱, 오랑캐장구채, 패랭이, 돌담초, 섬기린초,

마늘, 대청부채, 벌개미취, 쑥부쟁이 등 총 270만본 ) 식재 100만본

◦ 조경시설(계류.폭포등) 및 조경수 식재 완료 (소나무 등)

◦ 전기, 통신 시설 전 공정 마무리

◦ 전체공정 - 98%

□ 금후계획

◦ 자생공원 순환 외곽도로 아스팔트 포장 : 2009. 3

◦ 조경수 및 초화류 지속 식재 154만본 : ‘09. 2 ～ ’09. 5

◦ 조경시설물(편익시설 등) 설치 : 벤치, 동물상

◦ 사업완료 공원개장 : ‘09. 4

허브테마파크 조성 사업

□ 사업개요

○ 조성면적 : 89,450㎡

○ 사업내용 : 기반시설89,450㎡, 포장공 261a, 상․하수 관로 5,540m

도로 588m, 관리동(784㎡), 조경시설 1식

○ 총사업비 : 8,732백만원(균특  4,356  도비  600  시비3,776)

( 2005년도 2,020  2006년도 3,014   2007년도 3,698 )

○ 사업기간 : 2006 ~ 2009

□ 추진실적

○ 단지조성 ( 도로포장 261a, 주차장 453대, 상․하수도 : 5,540m )

○ 관리동(784㎡) 1동 -  관리실, 카페테리아, 변전실, 방송실 완공

○ 화장실(79.2㎡) 1동 - 완공 (온풍기, 경음악 기기 설치)

○ 조경식재 : 소나무외 24종 6,887 주 ( 교목 411주, 관목 6,476주 )

□ 금후 계획

○ 지리산 웰빙허브산업특구변경 심의회 개최        :  ‘09. 2

○ 관리동･화장실 주변 부지정리 및 조경 허브 식재  :  ‘09. 1 ~ 4

○ 추가개발 주차장 부지확보(3,600평)              :  ‘09. 1 ~ 4

○ 허브특구지역  순환도로 개설 추진(운봉읍-특구간) :  ‘09. 3 ~

주요민자사업 도시관리계획 추진현황

사업명	사 업 개 요	주 요 추 진 상 황	금 후 계 획
남 원 C·C	◦ 위치: 덕과면 고정리 ◦ 면적: 1,188,374⇒971,135㎡ ◦ 규모: 회원제27홀⇒18홀 ◦ 사업비: 약669억원 ◦ 사업기간: 2008~2011 ◦ 시행자: (주)롯데햄	◦ 기정27홀 도시관리계획결정 고시 : ‘07.8.31 ◦ 변경입안제안(27홀⇒18홀): ‘08.11.5 ◦ 주민제안 수용통보 : ‘08.12.10 ※ 입안신청서류 준비 중	◦ 도시관리계획입안 ◦ 주민공람공고 ◦ 시의회 의견청취 ◦ 시 도시계획위원회 자문 ◦ 도 도시계획위원회 심의 ◦ 도시관리계획결정승인고시 ◦ 사업시행자지정, 실시계획 인가 신청 및 인가(시장)
상 록 C･C	◦ 위 치: 대산면 신계리 ◦ 면 적: 1,185,890㎡ ◦ 규 모: 대중제18홀 ◦ 사업비: 약669억원 ◦ 사업기간: 2007~2012 ◦ 시행자: 공무원연금관리공단	◦ 입안신청 : ‘07.9.11 ◦ 도시관리계획결정 고시 : ‘08.4.11 ◦ 사업시행자지정고시 : ‘08.8.22 ◦ 환경영향평가 초안 공람공고 21일간 (2008.12.29 ~ 1.19)	◦ 환경영향평가 ◦ 실시계획열람공고 ◦ 관계기관·부서 협의 ◦ 실시계획인가(시장) ◦ 사업착수
드라곤 레이크 C·C	◦ 위 치: 대산면 옥율리 ◦ 면 적: 948,197㎡ ◦ 규 모: 회원제18홀 ◦ 사업비: 약650억원 ◦ 사업기간: 2007~2011 ◦ 시행자: 대산농원(주)	◦ 입안신청 : ‘08.2.11 ◦ 도시관리계획결정 고시 : ‘08.6.9 ◦ 사업시행자지정고시 : ‘08.7.14 ◦ 환경영향평가 협의 : ‘08.11.10~ ◦ 실시계획인가신청 : ‘08.11.26 ◦ 실시계획인가전 열람공고 : ‘08.12.5 ※ 관계기관 협의 중	◦ 관계기관·부서 협의 ◦ 실시계획인가(시장) ◦ 사업착수
비 젼 C·C	◦ 위 치: 운봉읍 덕산리 ◦ 면 적: 248,500⇒914,784㎡ ◦ 규 모: 회원제9홀⇒18홀 ◦ 사업비: 약697억원 ◦ 사업기간: 2007~2011 ◦ 시행자: H·H관광개발(주)	◦ 기정9홀 도시관리계획결정 고시 : ‘05.12.9 ◦ 변경입안신청(9홀⇒18홀) : ‘08.1.18 ◦ 주민공람공고 : ‘08.3.18~4.17 ◦ 시의회의견청취 : ‘08.6.12 ◦ 도 산지관리위원회 심의 : ‘08.12.11 ※ 시 도시계획위원회 준비 중	◦ 시 도시계획위원회 자문 ◦ 변경결정승인 신청(시→도) ◦ 도 도시계획위원회 심의 ◦ 도시관리계획결정승인고시 ◦ 사업시행자지정, 실시계획 인가 신청 및 인가(시장)
스위트 호 텔 남 원	◦ 위 치: 주천면 용담리 ◦ 면 적: 84,520㎡ ◦ 규 모: 호텔19,231㎡외 (지상4,지하1층) ◦ 사업비: 약400억원 ◦ 시행자: 공문교육연구원(주)	◦ 입안신청 : ‘07.8.22 ◦ 도시관리계획결정 고시 : ‘08.6.20 ◦ 문화재현상변경허가 : ‘08.7.22 ◦ 개발행위 허가신청 : 2009. 1	◦ 관광사업계획승인(시장) - 농지,산지,하천 등 협의 ◦ 건축허가(시장) ◦ 사업착수
엠피온스공장	◦ 위 치: 송동면 신평리 ◦ 면 적: 107,285㎡ ◦ 규 모: 공장 18,980㎡/5동 ◦ 사업비: 약270억원 ◦ 시행자: (주)엠피온스	◦ 입안신청 : ‘08.10.1 ◦ 주민공람공고 : ‘08.10.28~11.17 ◦ 시의회 의견청취 : ‘08.11.12 ※ 관계기관 협의 중	◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의 ◦ 도 도시계획위원회 심의 ◦ 도시관리계획결정고시 ◦ 공장승인, 개발행위허가 등

읍․면지역 도로명사업 추진

□ 개  요

◦ 위    치 : 시의 읍․면지역

◦ 총사업비 : 800백만원(국비 240, 도비168, 시비 392)

◦ 사업규모 : 1읍15면 701.1㎢

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2009(3년)

◦ 사업내용 : 읍․면지역 도로명 및 건물번호 부여사업

- 도로구간 기․종점설정 및 도로명부여, 건물주출입구조사, 도로명 및          건물번호 DB구축, 안내약도 제작, 도로명판 및 건물번호판 설치

	<시의 동지역 추진내역>
◦ 기 간 : 2000 ～ 2003 ◦ 사업량 : 51.7㎢(사업비 567백만원) ◦ 내 용 : 도로명 D/B구축, 도로명판 및 건물번호판설치(도로344노선, 건물8,937동)

□ 추진상황

◦ 도로명판 및 건물번호판 설치 추진 : ‘08. 12 ～ ’09. 9

- 사업량 : 도로554개구간, 건물 21,066동

- 사업비 : 509백만원(2008 사고이월 162백만원, 2009예산 347백만원)

- 내  용 : 도로명판 830개소, 건물번호판 21,066개 설치

□ 금후계획

◦ 동지역 도로명 재정비  : ‘08.  6 ～ ’09. 12

◦ 도로명 안내지도 제작  : ‘09. 7 ～ ’09. 12

◦ 도로명주소의 고지, 고시 : ‘10.  1 ～ ’10. 12

지리정보시스템(GIS) 안정적 운영

□ 개    요

◦ 대  상 : 시스템(서버) 4종

- 인터넷생활지리시스템, 인트라넷지리정보시스템,

- 도로 및 상하수도 관리시스템, 유관기관통합관리시스템

◦ 사용자 : 공무원, 유관기관, 시민

	<지리정보시스템(GIS)구축사업 추진>
◦ 기 간 : 2005 ～ 2008 ◦ 사업량 : A=25㎢(도로 156㎞, 상수도 213㎞, 하수도 221㎞) ◦ 사업비 : 4,280천원(국비 50%, 시비 50%) ◦ 내 용 : 도로와 지하시설물 D/B 구축, 4종 시스템 개발 등

□ 추진상황

◦ 지리정보시스템 최신 위성사진 탑재 : ‘08. 12 ~ ‘09. 1

◦ 인트라넷시스템과 한국토지정보시스템 연계추진 : ‘08. 12 ~ ‘09. 1

□ 금후계획

◦ GIS 시스템 안정화를 위한 시스템 운영 :‘09. 1~

- 지속적인 최신 버전 업데이트로 시스템 안정화 도모

◦ 지하시설물 관련 사업시 자료갱신 업무지원 및 자료제공 :‘09. 1~

◦ 도로 및 상하수도 관리시스템 사용자 지속적 교육(수시) :‘09. 1~

◦ 유관기관 지하시설물 자료 주기적 갱신 : 정기(6월), 수시

◦ 지리정보시스템(H/W, S/W) 유지보수 계약  :‘09. 10~