2009. 11

주 요 업 무 보 고

건   설   과

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2009년 주요업무 결산
□ 주요업무 추진상황
◦ 읍면지역시도 확․포장사업
◦ 농어촌도로 확․포장사업
◦ 교통소통 대책사업
◦ 오지종합개발사업
◦ 통행불편 마을진입로 정비사업
◦ 기업유치를 위한 기반시설확충사업
◦ 자동차 교통관리 개선사업
◦ 쾌적한 도로유지관리
◦ 소규모 주민숙원사업 추진
◦ 수해상습지 개선사업
◦ 하도 준설 사업
◦ 소하천 정비 사업
◦ 하천 유지 관리사업

일  반  현  황

□ 기    구

												건설과장
												최 상 근
건 설 담 당							토 목 담 당												하 천 담 당										지역개발담당
노 병 욱							진 영 신												주 재 옥										조 장 모
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속							읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 교통소통대책사업 오지종합개발사업 통행불편 도로사업												치 수 사 업 하천유지관리 골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가											소규모 주민숙원사업 포 괄(POOL)사 업 보 조 사 업 소규모시설 유지관리

□ 인    력

구분	계	일 반 직						계약직	기 타 직
		5급	6급	7급	8급	9급	기능	전 임 마 급	계	청경	도로 보수원
정원	28	1	4	7	5	2	7	2	20	8	12
현원	22	1	5	7	3 (휴직1)	-	4	2	20	8	12
증감	△6	-	1	-	△2	△2	△3	-	-	-	-

□ 도로현황(2009. 1. 1기준)

(단위 : km)

도로별	노선수	총연장	포 장	포장율(%)	비 고
합 계	838	1,338.6	683.4	51.1
고 속 국 도	1	42.0	42.0	100
국 도	5	120.6	120.6	100
국가지원지방도	2	54.3	54.3	100	전북 96.6%
지 방 도	7	140.6	119.5	85.0	전북 79.1%
시 도	472	174.4	81.8	46.9	전북 66.5%
읍 면 시 도	20	193.9	94.6	48.8	전북 46.1%
농 어 촌 도	331	631.8	173.0	27.4	전북 31.3%

□ 하천현황(2009. 1. 1기준)

(단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	42	283.2	432.9	336.2	96.7	77.7
국가하천	2	36.2	40.1	40.1	-	100
지 방 하 천	40	247.0	392.8	296.1	96.7	75.4	전북 79.0%

□ 소하천 현황(2009. 1. 1기준)

(단위 : km)

총개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
		계	개 수	미개수
349	392.1	690.1	438.5	251.6	63.5	전북 21.7%

2009년 주요업무 결산

	주요성과
◦ 도로기능 효율성 제고를 통한 지역소득기반 기틀마련 ◦ 철저한 도로유지관리로 시민안전 확보 및 도로환경 개선 ◦ 친환경 생태하천 조성으로 자연재해 근원적 예방

□ 불편도로 개선을 통한 지역 균형 발전 및 경쟁력 확보-32개소/10,992백만원

◦ 읍면지역시도 확포장 : 4개소 / 2,931백만원

◦ 농어촌도로 확포장 : 4개소 / 1,150백만원

◦ 교통소통대책 : 2개소/2,500백만원  ◦ 오지종합개발 : 7개소/2,429백만원

◦ 통행불편 마을진입로 정비 : 12개소 / 1,682백만원

◦ 기업유치를 위한 기반시설확충사업 : 3개소 / 300백만원

□ 쾌적하고 안전한 도로유지관리로 시민불편 최소화-29개소/2,231백만원

◦ 자동차 교통관리 개선사업 : 2개소/574백만원

◦ 쾌적한 도로유지관리사업 : 27개소/1,657벡만원

□ 소규모 주민숙원사업 해결로 생활주변 불편해소-445개소/7,572백만원

◦ 소규모 주민숙원사업 : 445개소/7,572백만원

□ 환경친화적 생태하천 복원으로 자연재해예방-31개소/16,772백만원

◦ 수해상습지개선 : 3개소/6,334백만원 ◦ 하 도 준 설 : 4개소/6,564백만원

◦ 소 하 천 정 비 : 6개소/3,612백만원 ◦ 하천유지관리 : 18개소/262백만원

※ 한국의 아름다운 하천 100선 수상(2009. 4. 27)

․주 최 / 주 관 : 국토해양부 / 한국하천협회

- 뱀사골(만수천, 지방하천) : 전국 7위

	아쉬운 점
◦ 일부 시민의 기초질서 의식 부재로 인한 도로불법행위 만연 ⇒ 소수 생계형과 차량이용 노점 야간 및 휴일영업

주요업무 추진상황

읍면지역 시도 확․포장사업

□ 개   요

◦ 총 계획 : 20개노선- 193.9km

- 기 시행(1991～2008년) : 12개노선- 94.6km- 44,766백만원(포장율 48.8%)

◦ 2009시행 : 4개노선- 12.1km- 2,931백만원(시비 100%)

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사 업 비(백만원)				사업 기간
				계	기투자	2009	2010이후
합 계		4개노선	12.1	18,900	5,983	2,931	9,986
계속사업	초동～범실	이백	2.2	2,900	2,069	831	-	‘06～’09
	장교～임리	운봉	4.0	5,000	2,003	700	2.297	‘07～’11
	용평～다산	보절	2.3	5,000	1,114	700	3,186	‘07～’11
	대신～대신	사매	3.6	6,000	797	700	4,503	‘07～’11

□ 추진실적

◦ 사업완료(3개 노선)

- 초동～범실 : ‘09. 7월 전체공사 완료

- 장교～임리 : ‘09. 8월 2009 시행분 완료 / 전체공정 54%

- 대신～대신 : ‘09. 8월 2009 시행분 완료 / 전체공정 25%

◦ 공사 중(1개 노선)

- 용평～다산 : 토공 및 구조물 작업 / ‘09공정 65%(전체공정 36%)

□ 금후계획

◦ 용평~다산 : 도로 측구설치 등 ‘09시행분 완료 - ‘09. 11월중

농어촌도로 확․포장사업

□ 개   요

◦ 총 계획 : 331개노선- 631.8km

- 기 시행(2001～2008년) : 173.0km- 63,000백만원(포장율 27.4%)

◦ 2009시행 : 4개노선- 5.1km- 1,150백만원(시비 100%)

구 분		위 치	사업량(km)	총사업비(백만원)				사업 기간
				계	기투자	2009	2010이후
합 계		4 개노선	5.1	9,740	5,424	1,000 (150)	3,316
계속사업	황산선	운봉 화수	1.1	4,350	4,350	(150)	-	‘06～’09
	배촌선	주천 배덕	1.6	2,700	894	600	1,206	‘07～’11
	송입선	대강 송대	1.7	1,700	90	200	1,410	‘08～’11
	자래선	인월 자래	0.7	990	90	200	700	‘08～’10

※ (  )는 사고이월 사업비

□ 추진실적

◦ 공사완료(3개 노선)

- 황 산 선 : ‘09. 5. 전체공사 완료

- 송 입 선 : ‘09. 8. 2009시행분 공사 완료 / 전체공정 17%

- 자 래 선 : ‘09. 6. 2009시행분 공사 완료 / 전체공정 30%

◦ 공사중(1개 노선)

- 배 촌 선 : 농로교 완료 및 석축시공 / ‘09공정 85%(전체공정 55%)

□ 금후계획

◦ 배 촌 선 : 석축시공 등 2009시행분 완료 - 2009. 11월중

교통소통 대책사업

□ 사업개요

◦ 총 계획 : 38개노선 59.8㎞

- 기 시행(2008까지) : 4개노선- 4.66㎞- 46,219백만원

◦ 2009시행 : 2개노선- 590m- 2,500백만원(특별교부세 1,000, 시비 1,500)

구 분		위 치	사업량(m)	총사업비(백만원)				사업 기간
				계	기투자	2009	2010 이후
합 계		2개노선	590	10,600	3,521	2,500	4,579
계속	이백～운봉간 도로	이백 과립	500	7,700	3,521	1,500	2,679	‘06～’10
신규	산동 월석교 재가설	산동 월석	90	2,900	-	1,000	1,900	‘09~’10

□ 추진실적

◦ 추진중(2개 노선)

- 이백～운봉간 도로 : 과립2교 및 기층포장 / ‘09공정 90%(전체공정65%)

- 산동 월석교 재가설 : 가설도로 설치 / ‘09공정 30%(전체공정 10%)

□ 금후계획

◦ 이백～운봉간 도로  : 과립교 철거 등 ‘09시행분 완료 - 2009. 11월중

◦ 산동 월석교 재가설 : 하부구조 설치 등 ‘09시행분 완료 - 2009. 11월중

오지종합개발사업

□ 사업개요

◦ 총 계획 : 8개면- 54개소- 15,047백만원

- 기 시행(3차) : 38개소- 10,183백만원(2005 ～ 2008년)

┏ 완  료 : 4개면(덕과, 산동, 인월, 산내) - 5,522백만원

┃

┗ 추진중 : 4개면(수지, 대강, 보절, 아영) - 4,661백만원

◦ 2009시행 : 7개소- 2,429백만원(균특 : 70%, 시비 : 30%)

사 업 명		사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간
			계	기투자	2009	2010
합 계		7개소	9,525	4,661	2,429	2,435
수지	소 계	1개소	2,333	1,200	600	533
	고품질 한우단지 조성	3,300㎡			600		‘09
대강	소 계	2개소	2,471	1,425	506	540
	녹색 체험마을 연결도로	2,000m			220		‘09
	사석～저동간 연결도로	3,000m			286		‘09
보절	소 계	3개소	2,402	1,012	687	703
	소재지 하수도 정비	300m			400		‘09
	오디뽕 소득원 진입로	200m			70		‘08~‘09
	소재지 소하천 정비사업	200m			217		‘09
아영	소 계	1개소	2,319	1,024	636	659
	흥부골 작목반 진입로	650m			636		‘09

□ 추진실적

◦ 사업완료(4개소)

- 대강녹색체험마을, 대강 사석~저동간, 보절 오디뽕 소득원 도로,

보절 소재지 소하천

◦ 공 사 중(3개소)

- 수지 고품질 한우단지조성 : 부지조성 완료 / 공정 45%

- 보절 소재지 하수도 정비 : 오수관 부설 / 공정 60%(수도사업소 추진)

- 아영 흥부골 작목반 진입로 : 하수도 및 인도포장 완료 / 공정 85%

□ 금후계획

◦ 공사중 3개소 완료 : 2009. 11월중

통행불편 마을진입로 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 8개 읍․면

◦ 사 업 량 : 12개소 / 5.2km

◦ 사 업 비 : 1,682백만원(시비 100%)

구분	사 업 명	위 치	사업량 (m)	총 사 업 비(백만원)
				계	기투자	2009	이후
	합 계	12개소	5,207	3,862	740	1,682	1,440
계속	운봉 준향진입로	운봉 준향	390	650	200	450	-
	춘향골 퇴비공장도로	금지 상신	370	280	90	190	-
	귀정사 교량가설	산동 대상	27	600	450	150	-
신규사업	두곡 진입도로	송동 두신	350	420	-	100	320
	진목 진입도로	보절 진기	900	500	-	150	350
	연동 진입도로	운봉 장교	840	970	-	200	770
	운봉 향교진입로	운봉 산덕	300	50	-	50	-
	사매임산물 반출로	사매 계수	190	27		27
	사매 대율진입로	사매 대율	50	60	-	60	-
	아영 율동 진입로	아영 의지	30	45	-	45	-
	다산종돈 진입로	운봉 가산	220	130	-	130	-
	고산,장평뜰진입로	도통동	1,540	130	-	130	-

□ 추진실적

◦ 공사완료(9개소)

- 운봉 준향, 운봉 춘향골 퇴비, 산동 귀정사 교량 , 운봉 연동 진입도로,

운봉 향교, 사매 임산물반출로, 사매 대율, 아영 율동, 도통 고산 장평뜰

◦ 공 사 중(3개소)

- 송동 두곡 진입도로(공정 45%), 보절 진목 진입도로(공정 15%),

운봉 다산종돈 진입로(공정 50%)

□ 금후계획

◦ 공사중인 3개소 사업완료 : 2009. 11월 ~12월중

기업유치를 위한 기반시설 확충사업

□ 개   요

◦ 대상사업 : 3개소 L= 2.3㎞, B= 10m

◦ 사 업 비 : 300백만원

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사 업 비(백만원)				사업 기간	비 고
				계	기투자	2009	2010이후
합 계		3개소	2.3	3,750	730	300	2,720
계속사업	가장~가재	운봉	0.7	950	60	50	840	‘07～’12	비전 C.C
	월평~신정	덕과	1.2	1,500	100	50	1,350	‘07～’11	남원 C.C
	월계 도로	대산	0.4	1,300	570	200	530	‘08～’10	상록 C.C

□ 추진실적

◦ 토지매입(2개소)

- 가장~가재 도로 : 편입토지 분할측량 완료

- 월평~신정 도로 : 용지 매입 중

◦ 추진 중(1개소)

- 월계도로 : 시공측량, 토공작업 / ‘09공정 25%(전체공정 15%)

□ 금후계획

◦ 월계도로 : 도로 암거설치 등 2009시행분 완료 - 2009. 12월

자동차교통관리개선사업

□ 개    요

◦ 대상사업 :  2개 사업 - 574백만원(국비 287, 시비287)

∘ 위험도로구조개선 : 1개소, 460백만원(국비 230, 시비 230)

- 손율도로 선형개량(사매) : 선형개량 L=685m

∘ 교통사고잦은곳 개선사업 : 1개소, 114백만원(국비 57, 시비 57)

- 향교동 KBS앞 도로정비 : 도로정비L=520m

□ 추진실적 ----------------- 2개사업 / 574백만원

◦ 위험도로 구조개선사업 완료 ----------- 1개소 / 460백만원

∘ 손율도로 선형개량사업(사매면 월평리) : L=685m, B=9.0m

- 배수시설 - L형측구설치 L=1,023m, J형측구 :210m, 개거 L=291m

- 포 장 공 - 표층 A=60a, 기층A=19a

◦ 교통사고잦은곳 개선사업 완료 ---------- 1개소 / 114백만원

∘ 향교동 KBS앞 도로정비 : L=520m, 재포장24a

- 배수시설 - L형측구 : 851m, 개거(500×500) : 100m

- 미끄럼방지포장(검정색) / 231㎡, 차선도색(백색)/ 156㎡

- 포 장 공 : 표 층(#67) 24a,(제2공구 L=450m/동부우회도로)

□ 금후계획

◦ 2010년도 자동차교통관리개선사업 계획 수립

쾌적한 도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 대상사업 :  2개 사업 - 1,900백만원

∘ 도로(교량)시설물 유지관리 : 5개분야  1,400백만원

- 도로시설(교량) 및 갓길정비, 도로안전시설 등 정비

∘ 주요도로시설보수 및 유지관리 : 500백만원

- 4개노선 : 갓길(배수로)정비 및 시설물(도로표지판 등) 유지관리 보수

□ 추진실적 ---------- 2개사업 / 27개소 /1,657백만원

◦ 도로(교량)시설물 유지관리사업 ----- 5개분야 17개소 / 1,157백만원

- 교량유지관리 및 보수 : 관리도로 교량 33개소

(신축이음교체6, 난간정비4, 도색10, 안전진단13)

- 간선도로내 표지판정비 : 28개소 교체(강변로/광한루～필링3거리)

- 시의군도 갓길정비공사 : 4개노선(금지상귀, 수지호곡, 운봉 임리․북천리)

(배수로정비L=128m, 측구 L=4,380m)

- 안전시설물 정비 : 과속방지턱정비33, 반사경지주정비1, 반사경설치54, 가드레일 L=260m

- 도로유지관리보수 : 시가지 빗물고임지구정비14, 배수개선1,

통과높이 제한시설 1개소(화수교), 도로안전시설정비1(과속방지턱6, 반사경6)

◦ 주요도로시설보수 및 유지관리 ------------- 10개소 / 500백만원

- 주요도로정비 : 주천선 시선유도봉정비376m, 보절선(갈치동)갓길정비        640m, 문오선(신촌동) 배수로정비460m, 쑥고개길(노암동) 갓길정비166m,

기타 6개소(도로표지판 정비5, 홍보물 정비1)

□ 금후계획

◦ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 도로 환경정비 지속 추진

소규모 주민숙원사업 추진

□ 사업개요

◦ 위    치 : 23개 읍․면․동

◦ 사업내용 : 마을진입로, 안길, 농로, 하수구, 마을회관, 모정 등 소규모시설

◦ 사 업 량 : 445개소(진입로 196건, 안길 117건, 농로및소규모시설 132건)

◦ 총사업비 : 445개소 7,572백만원(확정 : 436건)

(단위 : 개소, 백만원)

사업구분	계		시 설 비		민간자본보조		비고
	개 소	사업비	개 소	사업비	개 소	사업비
합계	445	7,572	357	6,069	88	1,503
읍면동숙원사업	226	4,426	191	3,836	35	590
포괄(POOL)사업	50	1,000	30	600	20	400
면 자체사업	110	1,100	110	1,100
국.도비보조사업	46	836	13	323	33	513
유지관리사업	13	210	13	210	-	-

□ 추진실적

◦ 공사완료 : 436개소(7,452백만원)

◦ 공 사 중 :  9개소(120백만원)

□ 금후계획

◦ 포괄사업 연중 추진으로 시행중 사업 연내 마무리

수해상습지 개선사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 22지구  82.42km,   90,963백만원

- 기 시행(2008까지) : 7개지구  21.1km,   34,550백만원

◦ 2009년사업 : 3개지구  11.5km,  6,334백만원(국비60%, 도비20%, 시비20%)

지구별	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)					비고 (사업기간)
			계	기 투자	2009		2010이후
					당초	추경
계	3개지구	11.5	18,732	9,001	5,274	6,334	3,397
내척천	향교동	3.9	7,108	4,001	2,100	2,100	1,007	‘07 ～ ‘10
괴양천	보절 서치	4.2	5,936	2,501	1,574	1,574	1,861	‘07 ～ ‘10
진기천	보절 진기	3.4	5,688	2,499	1,600	2,660	529	‘07 ～ ‘10

□ 추진실적

◦ 사업완료(1개소)

- 내척천 : L = 2.0km, 구조물 4개소(전체공정 80%, ‘09공정 100%)

◦ 공사중(2개소)

- 괴양천 : L = 1.8km, 구조물 7개소(전체공정 60%, ‘09공정   80%)

- 진기천 : L = 1.4km, 낙차공 1개소(전체공정 85%, ‘09공정  75%)

※ 사업비 추가 확보 848백만원(국비 636 도비 212)

- 시비부담금 212백만원 미확보

□ 금후계획

◦ 동절기 이전 사업완료 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 추가사업비 확보에 따른 시비부담금 212백만원 2회추경 반영 추진

하도 준설 사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 10지구  45.64km,   45,388백만원

- 기 시행(2008까지) : 3개지구  14.84km,   9,261백만원

◦ 2009년사업 : 4개지구  15.1km,  6,564백만원(국비60%, 도비20%, 시비20%)

지구별	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)					비고
			계	기 투자	2009		2010이후
					당초	추경
계	4개지구	15.1	37,770	5,470	3,914	6,564	25,736
요 천	식정,산동	5.3	17,934	3,570	900	1,900	12,464	신규(‘09)
풍 천	아영 풍천	7.9	16,802	730	1,150	2,800	13,272	‘08 ～ ‘11
수외천	덕과 덕촌	1.4	2,204	1,140	1,064	1,064	-	‘07 ～ ‘09
주촌천	노 암 동	0.5	830	30	800	800	-	신규(‘09)

□ 추진실적

◦ 사업완료(1개소)

- 수외천 : L = 1.0km, 교량 1개소(전체공정 100%)

◦ 공사중(3개소)

- 풍      천 : L = 0.8km (전체공정 65%, ‘09공정 75%)

- 요천(식정) : L = 0.6km, 구조물 2개소 (전체공정 80%, ‘09공정 75%)

- 주  촌 천 : L = 0.5km, 구조물 2개소 (전체공정 90%, ‘09공정 95%)

※  사업비 추가 확보 2,120백만원 (국비 1,590 도비 530)

- 시비 부담금 530백만원 미확보

□ 금후계획

◦ 요천(산동 고소암) 지구 발주의뢰 : ‘09.  9.  23

- 사업비 2,328백만원 (‘09년 700백만원)

◦ 동절기 이전 사업완료 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 추가사업비 확보에 따른 시비부담금 530백만원 2회 추경 반영 추진

소하천 정비 사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 23지구 56.32km,  45,667백만원

- 기 시행 (2008까지) : 5개지구 15.23km,  10,988백만원(투자율 24%)

◦ 2009년사업 : 6개지구 10.74km, 3,612백만원(국비40%, 시비60%)

지구별	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)				비고
			계	기 투자	2009	2010이후
계	6개지구	10.74	14,604	7,152	3,612	3,840
사곡천	덕과 사율	2.01	1,567	817	300	450	계속(‘07～’09)
과립천	이백 과립	1.90	4,030	2,532	934	564	계속(‘09)
신정천	신정동	1.20	3,767	2,711	600	456	신규(‘09)
화정천	화정동	1.10	2,039	380	771	888	신규(‘09)
성리천	아영 성리	3.33	2,191	497	609	1,085	신규(‘09～’10)
새길천	보절 성시	1.20	1,010	215	398	397	신규(‘09～’10)

□ 추진실적

◦ 공사완료(3개소)

- 신정천, 화정천, 과립천

◦ 공 사 중(3개소)

- 성리천, 새길천(전체공정 35%, ‘09공정 70%)

- 사곡천(전체공정 90%, ‘09공정 95%)

□ 금후계획

◦ 동절기 이전 사업완료 추진

◦ 2010년 사업지구 실시설계 용역 4개소 추진(구지, 산덕, 산재, 산곡천)

하천 유지 관리사업

□ 개    요

◦ 소하천 유지관리

- 대  상 : 23개 읍면동 349개 소하천 L= 392.1km

- 사업비 : 175백만원

- '09년 사업량 : 14개소(L = 4.1km)

◦ 하천기성제 정비사업

- 대  상 : 국가하천 2개소 L= 36.2km, 지방하천 1개소 L = 5.0km

- 사업비 : 87백만원

□ 추진실적

◦ 소하천 유지관리 : 14개소 L = 4.1km(완료)

- 하상준설  9개소 / L = 3.9km / 시설물정비 5개소/ L = 0.2km

◦ 하천기성제정비 : 4개지구 L = 18.35km

- 완   료 : 대곡천 (하상준설) : L = 0.35km / 41백만원

- 추진중 : 3개지구 / 제초작업 및 수목제거 L = 18.0km

․ 섬진강 L = 1.0km, 요천 L = 14.0km, 광치천 L = 3.0km

□ 금후계획

◦ ‘09기성제 정비 심사대비 정비 추진 : 10. 25한

※ 기성제 심사(도) : ‘09. 11. 5 (예정)