2012. 10

2012 주요업무 추진실적

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2012년 주요업무 결산

□ 2012년 주요업무 추진실적

◦ 도로유지관리사업

◦ 시도 1호선 확장공사

◦ 읍면지역 시도 확포장사업

◦ 농어촌도로 확포장사업

◦ 기업유치 기반시설 확충사업

◦ 통행불편 마을진입도로 개설

◦ 지방하천 정비사업

◦ 람천 고향의 강 조성사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 하천유지관리 사업

◦ 소규모 주민숙원 사업

◦ 수해복구사업

◦ 2012년도 유관기관 투자사업 계획

일  반  현  황

□ 기    구

													건설과장
													진 영 신
건설행정담당							도 로 담 당													하 천 담 당										소규모시설담당
이 형 민							조 남 도													김 종 학										이 영 진
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속							읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 교통소통대책사업 통행불편 도로사업 도로 유지관리사업													치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가											소규모 주민숙원사업 포 괄(POOL)사 업 보 조 사 업 소규모시설 유지관리

□ 인    력

구분	계	일 반 직							계약직	기 타 직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	전 임	소계	청원경찰	도 로 보수원	무기계약
정원	44	24	1	4	6	5	2	6	-	20	7	12	1
현원	41	22	1	4	7	1	3	4	2	19	7	11	1
증감	△3	△2	-	-	1	△4	1	△2	2	△1	-	△1	-

□ 도로 현황

(2011.12.31기준 / 단위:km)

도로별	노선수	총연장	포 장	포장율(%)	비 고
계	839	1,349.4	691.3	51.2
고 속 국 도	2	66.3	66.3	100.0
국 도	5	113.0	113.0	100.0
국가지원지방도	2	45.8	45.8	100.0	전북 96.6%
지 방 도	7	120.2	102.9	85.6	전북 79.1%
시 도	472	174.4	89.5	51.3	전북 66.5%
읍 면 시 도	20	193.9	99.6	51.4	전북 46.1%
농 어 촌 도	331	635.8	174.2	27.4	전북 31.3%

□ 하천 현황

(2011.12.31기준 / 단위:km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	42	283.2	432.9	349.0	83.9	80.6
국가하천	2	36.2	40.1	40.1	-	100.0
지 방 하 천	40	247.0	392.8	308.9	83.9	78.6	전북 79.3%

□ 소하천 현황

(2011.12.31기준 / 단위:km)

총개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
		계	개 수	미개수
349	392.1	690.1	447.8	242.3	64.9	전북 21.7%

2012년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ ｢광치천 도심하천 생태복원사업｣ 신규사업 180억 확보 (국비 108억, 시비 72억) - ‘13년 계획 당초 10억 ⇒ 33억 확보 (국비 20억, 시비 13억)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 -16개소/1,463백만원

◦도로유지관리사업 16개소중 15개소 완공

- 위험도로 구조개선사업 2개소중 1개소 완공(L=1.04km/428백만원)

- 교통사고 잦은곳 정비사업 1개소중 1개소 완공(L=150m/90백만원)

- 회전교차로(구 남원역) 설치 1개소중 1개소 완공(1식/240백만원)

- 도로유지관리 및 시설물정비 9개소 완공(3식/345백만원)

- 시특법 교량 정밀점검 및  보수 3개소 완공(3식/70백만원)

□ 지역 균형발전을 위한 불편도로 개선-20개노선/7,717백만원

<2012년 20개노선 중 10개노선 완공 목표 달성>

◦읍면지역시도 확․포장사업 4개노선중 2개노선 완공(L=12.2km/2,797백만원)

◦농어촌도로 확․포장사업 4개노선중 2개노선 완공(L=4.8km/1,610백만원)

◦기업유치 기반시설 확충사업 3개노선중  2개노선 완공(L=2.7km/990백만원)

◦통행불편 마을진입로 : 9개노선중 4개노선 완공(L=6.1km/2,320백만원)

□ 재해 사전예방을 위한 생태하천 조성-40개지구/18,121백만원

<2012년 40개 지구 중 27개 지구 완공 목표 달성>

◦지방하천 정비사업 5개 지구중 1개 지구 완료(L= 26.0km/ 10,521백만원)

◦소하천 정비사업 3개 지구중 3개 지구 완료(L= 3.15km/ 4,193백만원)

◦람천 고향의 강 기본계획(변경) 및 실시설계용역 완료(L=5.3km/1,133백만원)

◦하천유지관리사업 31개 지구중 23개 지구 완료(L= 18km/ 2,274백만원)

□ 주민 삶의 질 향상을 위한 소규모 주민숙원사업 추진- 455건/7,728백만원

◦ 소규모 주민숙원사업 : 23개읍․면․동 455건중 332건 완료(전체 72%)

□ ‘11.7.9～10(호우피해), ‘11.8.6～10(무이파) 수해복구사업 추진

◦ 46개지구 / 3,786백만원(준공 46건)

	아쉬운 점
◦ 예산확보의 어려움으로 계획년도 내에 공사 완공 차질 불가피

2012년 주요업무 추진실적

도로 유지관리사업

□ 사업개요

사 업 명	사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계	10개분야		1,463
위험도로 구조개선사업	대강면 신덕리	L=340m	228	국비 50% 시비 50%
	주생면 도산리	L=700m	200
교통사고 잦은곳 정비사업	신촌동 일대	L=150m	90	〃
회전교차로 설치사업	동충동	1식	240	〃
도로 유지관리․보수	관내도로	1식	200	시비 100%
교량 유지관리․보수	관내교량	1식	100	〃
시특법 대상 교량 정밀점검	관내교량	3개소	70	〃
관리도로내 안전시설물 정비	관내도로	1식	45	〃
도로표지판 정비	관내도로	1식	40
요천로 포장 덧씌우기	식정동	L=3.6km	200	〃
택지개발지구내 대지경계블럭 정비	도통동	1식	50	〃

□ 추진실적

◦ 위험도로 구조개선사업 완료      : 1개소 / 228백만원

◦ 교통사고 잦은곳 정비사업 완료   : 1개소 /  90백만원

◦ 회전교차로(구 남원역) 설치 완료  : 1개소 / 240백만원

◦ 도로유지관리 및 시설물정비 완료 : 9개소 / 330백만원

◦「시특법」대상교량 정밀점검 완료 : 3개소 /  55백만원

□ 금후계획

◦ 지속적인 도로 및 교량 유지관리 추진

시도1호선 확장공사

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 오수 ～월락간 도로 확장공사

◦ 위    치 : 향교동(백공산4가) ～ 용정동(오성주유소)

◦ 사 업 량 : L=2.82km, B=26.0～29.5m

◦ 사 업 비 : 6,264백만원(국비) / 사업기간 : 2012 ～ 2016년

◦ 토지보상 : 1,120백만원(‘11년 200, ’12년 600, ‘13년 320)

□ 추진실적

◦ 오수～월락간 확장공사에 포함 시행 건의    : 2005 ~ 2007

◦ 오수～월락간 확장공사 착공(시도1호선 포함) : 2009. 04. 02

◦ 도시계획시설사업 실시계획 인가             : 2011. 06. 10

※ 사업시행 건의(시→익산청)시 행정절차와 토지매입 남원시 시행조건

◦ 편입토지 분할측량 실시                   : 2011. 08 ~ 09월

◦ 편입토지 감정평가 및 보상협의 통보       : 2011. 11 ~ 12월

◦ 손실보상 협의추진                        : 2012 ~ 2013

(보상율 63% : 전체 59필지 중 37필지 협의완료)

□ 금후계획

◦ 손실보상 지속추진 : ‘12. 1 ~ ’13. 6월

- 토지소유자 유선 및 방문 보상협의 독려

◦ 손실보상금 320백만원 미확보

ꁾ 2013년 본 예산 확보추진

읍면지역 시도 확․포장사업

□ 사업개요

◦계      획 : 4개노선/12.2km/19,700백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 4개노선/12.2km/ 8,604백만원(투자율 : 44%)

- 사업기간 : 2007 ~ 2014(8개년)

◦2012 시행 : 4개노선 / 12.2km / 2,797백만원 (투자율 14%)

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
				계	기투자	2012	2012이후
계		4개노선	12.2	19,700	8,604	2,797	8,299	58
계속 사업	장교~임리	운봉읍	4.0	5,800	3,603	1,197	1,000	83	‘07~’13
	용평~다산	보절면	2.9	5,700	2,614	100	2,986	48	‘07~’14
	대신~대신	사매면	3.6	6,000	2,297	1,000	2,703	55	‘07~’14
	송기~백평	송동면	1.7	2,200	90	500	1,610	27	‘10~’14

□ 추진실적

◦장교~임리 : ‘12. 3월 공사착공 / 권포~임리구간 L=1.2km 포장완료

◦용평~다산 : 1공구 용지매입 추진(총 57필지 중 41필지 보상완료)

◦대신~대신 : ‘12. 3월 공사착공 / 금차분 공사완료(토공 및 구조물공)

◦송기~백평 : 분할측량, 감정평가완료 / 용지매입추진(총 58필지중 28필지 보상완료)

□ 금후계획

◦장교~임리 : 임리마을 진입구간 L=0.2km ‘13년 상반기중 공사완료

◦용평~다산 : 잔여구간(1공구) ‘13년 상반기 공사발주 및 영농기 이전 공사착공

◦대신~대신 : ‘13년 토공 및 구조물공 완공 추진

◦송기~백평 : 용지매입 지속추진 및 '13년 장기계속공사 발주

농어촌도로 확․포장사업

□ 사업개요

◦계      획 : 4개노선/4.8km/7,300백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 4개노선/4.8km/4,166백만원(투자율 : 57%)

- 사업기간 : 2007 ~ 2013(7개년)

◦2012 시행 : 4개노선 / 4.8km / 1,610백만원 (투자율 22%)

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
				계	기투자	2012	2012이후
계		4개노선	4.8	7,300	4,166	1,610	1,624	82
계속 사업	배촌선	주천면	1.6	3,200	2,294	800	206	94	‘07~’13
	송입선	대강면	1.6	1,700	890	100	710	58	‘08~’13
	자래선	인월면	0.7	1,200	790	410	-	100	‘08~’12
	식련선	산동면	0.9	1,200	192	300	708	46	‘11~‘13

□ 추진실적

◦배 촌 선 : ‘12. 3월 공사착공 / ’12. 9. 24일 공사완료(포장완료)

◦송 입 선 : 2공구 도로폭 변경(B=4m→6m)에 따른 용지보상 추진

◦자 래 선 : ‘12. 3월 공사착공 / 6월 조기 공사완료(준공기한 ’12.12.30)

◦식 련 선 : 1차분 착공(‘12. 6. 4) 및 토공 및 구조물공 시공중

□ 금후계획

◦배 촌 선 : ‘13년 부대공 및 전체 공사완료

◦송 입 선 : 2공구 설계변경 및 용지보상 추진 / ‘13년 지속 공사추진

◦식 련 선 : ‘13년 전체 공사완료 추진

기업유치 기반시설 확충사업

□ 사업개요

◦계      획 : 3개노선/2.7km/3,060백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 3개노선/2.7km/1,380백만원(투자율 : 45%)

- 사업기간 : 2009 ~ 2014(6개년)

◦2012 시행 : 2개노선 / 2.0km / 990백만원 (투자율 32%)

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간	비고
				계	기투자	2012	2012이후
계		3개노선	2.7	3,060	1,380	990	690	77
계속 사업	월계도로	대산면	0.4	1,260	920	340	-	100	'09~'12
	읍면시도 11호선	대산면	1.6	850	200	650	-	100	'11~'12
	가장~가재간	운봉읍	0.7	950	260	-	690	27	'13~'14

□ 추진실적

◦월계도로 : ‘12. 5월 공사완공

◦읍면시도11호선 : ‘12. 6월 공사 조기완공(준공기한 ’13. 6. 27)

◦가장~가재간 : 비젼골프장 진입도로 변경에 따른 실시설계 변경용역 추진

□ 금후계획

◦가장~가재간 : 실시설계 변경에 따른 용지보상 재 산정 및 협의 추진

통행불편 마을진입로 정비사업

□ 사업개요

◦계      획 : 9개노선/6.1km/5,470백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 3개노선/3.0km/1,140백만원(투자율 : 21%)

- 사업기간 : 2009 ~ 2013(5개년)

◦2012 시행 : 9개노선 / 5.8km /2,320백만원 (투자율 42%)

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
				계	기투자	2012	2012이후
계		9개노선	6.1	5,470	1,140	2,320	2,010	73
계속 사업	연동 진입로	운봉읍	0.8	1,270	500	570	200	84	‘09~’13
	진목 진입로	보절면	1.9	690	500	190	-	100	‘09~’12
	용담 진입로	주천면	0.3	950	140	200	610	36	‘11~’13
신규 사업	만동 2진입로	덕과면	0.8	200	-	50	150	25	‘12~’13
	이백초 진입로	이백면	0.3	200	-	50	150	25	‘12~’13‘
	대율 진입로	사매면	0.5	600	-	200	400	33	‘12~’13
	군도15호 대기차선	이백면	0.5	500	-	500	-	100	‘12
	율천 진입로	덕과면	0.3	60	-	60	-	100	‘12
	주천 소재지정비	주천면	0.7	1,000	-	500	500	50	‘12~’13

□ 추진실적

◦연동진입로 : ‘12. 3월 공사착공 / 6월말 공사완료

◦진목진입로 : ‘12. 5. 12일 공사착공 / 9월말 공사완료

◦용담진입로 : 1차분 공사착공(‘12.6.4) 토공 및 구조물 시공중

◦신규사업 6개지구 : 실시설계완료 및 공사착공 / 2개지구 조기완공

□ 금후계획

◦진목진입로 : 구조물공 및 포장공 시공으로 7월중 공사완료 추진

◦용담진입로 : 1차분 토공 및 구조물공등 공사시행

◦신규사업(6개지구) : 10월중 공사완료 추진

북남원 나들목 진입도로 개설

□ 사업개요

◦위    치 : 대산면 운교리(시도 11호선) ~ 신정동(서부순환도로)/중로1-17호선

◦사 업 량 : L=3.5km, B=22.0m(4차로)

◦시업기간 : 2007 ~ 2016(10개년)

◦사 업 비 : 22,600백만원(재원 : 시비100%)

※ 공사비 179억원, 용지비 37억원, 설계비 10억원

구 분	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
			계	기투자	2012	2012이후
계		3.5	22,600	1,850	4,500	16,250	21.5
도 시 계획구간	신 정 동	1.1	7,100	1,150	4,500	1,450	58.5	'11~'13
비도시 계획구간	대산 운교~ 대산 금성	2.4	15,500	700	-	14,800	4.5	'14~'16

□ 추진실적

◦편입용지 보상 추진(100필지 중 80필지 완료) : 협의율 80%

※ 미 협의토지 : 소유자 거소불명 및 미상속자

◦교부세(10억) 및 도비(5원) 예산 추가확보 : 3차분 공사 추가발주

□ 금후계획

◦추경에 확보한 예산(기채 30억원) 금년내 집행될수 있도록 공사현장

중점 관리 공사추진

◦도로공사에서 88고속도로 통과 구간(화정교)을 2013. 6월 공사 완료하여      차선 전환할 계획으로 전환시기에 맞춰 도시구간 개통 추진

지방하천 정비사업

□ 사업개요

◦ 지방하천 정비사업 : 5개지구  L= 26.0km,

◦ 총사업비 :50,695백만원(기투자 23,409 국비60%, 도비20%, 시비20%)

◦ 사업계획

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				공정 (%)	사업 기간
				계	기투자	2012	2012이후
계		5개하천	26.0	50,695	23,409	10,521	16,765	65
신규 사업	갈치천	갈치동	3.9	4,913	-	834	4,079	설계중	‘12~’14
	운교천	대산면	2.4	5,529	266	2,104	3,159	20	‘11~’14
계속 사업	백암천	이백면	3.3	4,300	4,000	300	-	100	‘10~’12
	요 천	이백/산동면	10.0	17,933	10,055	3,089	4,789	60	‘06~’15
	풍 천	아영면	6.4	18,020	9,088	4,194	4,738	80	‘06~’14

□ 추진실적

◦ 5개지구 (신규 2개지구, 계속 3개지구)  추진 공정 65%

- 갈치천 : 실시설계 용역 착수 : ‘12. 3월 ~ 12월

- 운교천 : 축제(보상)  용지보상  총58필지/ 5필지 보상완료  공정  20%)

- 백암천 : 축제(호안)  L= 3.3km    9월 공 사   완 료     공정 100%)

- 요  천 : 축제(호안)  L= 10km   중  L= 6.0km  완료   공정  60%)

- 풍  천 : 축제(호안)  L= 6.4km   중  L= 5.0km  완료   공정  80%)

□ 금후계획

◦ 5개지구 ‘12년 시행분 12월 공사 완료 추진

- 갈치천 : 실시설계 후 용지보상과 11월 공사발주 및 착공

- 운교천 : 용지보상 및 축제(호안공) 추진 ‘12년 시행분 12월 공사 완료

- 요  천 : 축제(호안공) 추진 ‘12년 시행분 12월 공사 완료

- 풍  천 : 축제(호안공) 교량 1개소 (갈건교) 추진 ‘12년 시행분 12월 공사 완료

람천 고향의 강 조성사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 행정리(엄계교) ~ 운봉읍 신기리 (국악의 성지 앞)

◦ 사  업  량 : 고향의 강 조성  L= 5.3km

- 보축 5개지구 L= 5.6km, 가동보 4개소, 교량 1개소, 어도 4개소

◦ 사 업 비 : 21,122백만원 (국비60%, 도비20%, 시비20%)

⇒ 2012년사업 1,133백만원

◦ 사업기간 : 2011. 11 ~ 2016. 12 (5년간)

지구명	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				공정 (%)	사업 기간
			계	기투자	2012	2012이후
람 천	운봉읍	5.3	21,122	533	1,133	19,456	설계중	‘11~’16

□ 추진실적

◦ 실시설계 및 기본계획(변경) 용역 착수 : ‘11. 11. 30

- 완료 예정일 : ‘12. 9. 23(8.28. 전북도 기본계획심의에 따른 과업중지 중)

◦ 설계 자문위원 위촉 (16명) : ‘12. 3. 18

- 관계공무원 관련전문가 9명, 지역 주민 및 단체 7명

◦ 설계 자문위원 개최 : ‘12. 6. 12(운봉읍 서림숲 현장)

◦ 람천 고향의 강 조성사업 용역 중간 보고회 개최 : ‘12. 6. 20

◦ 하천기본계획 변경 심의 (전라북도) : ‘12. 10. 5

□ 금후계획

◦ 주민 설명회 개최 : ‘12. 10월

◦ 지방건설기술심의 상정 : ‘12. 10월

◦ 사업 발주 : ‘12. 11월

◦ 용지 보상 : ‘12. 11월 ~

소하천 정비사업

□ 사업개요

◦ 소하천 정비사업 : 3개지구   L= 3.15km

◦ 총사업비 : 4,193백만원(국비50%, 시비50%)

◦ 사업계획

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				공정 (%)	사업 기간
				계	기투자	2012	2012이후
계		3개하천	3.15	4,193		4,193		70
신규 사업	율치천	주천면	1.0	2,097	-	2,097	-	60	‘12
	아곡천	아영면	1.15	1,596	-	1,596	-	65	‘12
계속	뒤하천	보절면	1.0	500	-	500	-	100	‘11~’12

□ 추진실적

◦ 3개지구 (신규 2개지구, 계속 1개지구)  추진 공정 70%

- 율치천 : 축제(호안)  L=  1.0km 중  L= 0.5km  완료  공정 60%)

- 아곡천 : 축제(호안)  L= 1.15km 중  L= 0.6km  완료  공정 65%)

- 뒤하천 : 축제(호안)  L=   1.0km  8월 사 업  완 료  공정 100%)

□ 금후계획

◦ 2개지구 ‘12. 12월 공사 완료 추진

- 율치천 : 12월 공사 완료(축제 및 호안 0.5km)

- 아곡천 : 12월 공사 완료(축제 및 호안 0.55km)

하천 유지관리사업

□ 사업개요

◦ 하천 유지관리사업 총계획 : 4개사업  L= 18.0km,  2,274백만원

◦ 사업계획

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	공정 (%)	비고
계	4개사업	18	2,274	75
소하천 유지관리사업	23개 읍면동소하천 349개소 L= 392.1km 중 9.0km	9.0	256(시비)	85
하천기성제 정비성사업	지방하천 40개소 L= 247.0km	5.0	128 (도비50,시비78)	80
국가하천 유지보수사업	요 천(국가하천) L= 17.9km	3.5	1,801(국비)	50
섬진강(4대강) 유지보수사업	섬진강(국가하천) L= 18.3km	0.5	89(국비)	70

◦ 사업 내용

- 소하천 유지관리사업 : 하상준설 및 정비, 하천시설물 및 제방 유지보수

- 하천기성제 정비사업 : 제초작업 및 수목제거, 수문정비, 제방요철 정비 등

- 국가하천 유지보수사업 : 제초작업 및 수목제거, 수문정비 등

- 섬진강 유지보수사업 : 제방 유지보수, 수문정비, 수목제거, 기타 등

□ 추진실적 -  4개사업,  추진 공정 75%

◦ 소하천 유지관리사업 : 하상정비 L= 9.0km 중 L= 6.7km 완료

◦ 하천기성제 정비사업 : 제방정비 및 제초작업 L= 5.0km 중 L= 3.3km 완료

◦ 국가하천 유지보수사업 : 제방 보수  L= 3.5km 중 L= 1.5km 공사 중

- 9월 13일 2차 보조금 901백만원 교부 : 실시설계용역 설계  중

◦ 섬진강 유지보수사업 : 제방 보수  L= 0.5km 중 L= 0.2km 공사 중

□ 금후계획

◦ 소하천 유지관리사업 : 하상정비 L= 2.3km  10월 중 공사완료 추진

◦ 하천기성제 정비사업 : 제방정비(제초작업) L= 1.7km 10월 중 공사완료 추진

◦ 국가하천 유지보수사업 : 추가 사업발주 및 착공 10월, 12월 중 공사완료 추진

◦ 섬진강 유지보수사업 : 제방 보수 L= 0.3km  11월 중 공사완료 추진

소규모 주민숙원사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 23개 읍․면․동

◦ 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.(12개월간)

◦ 사업내용 : 마을진입로, 안길, 농로, 하수구, 마을회관, 모정 등

◦ 총사업비 : 455개소 / 7,728 만원

(단위 : 개소 /백만원)

사업구분	계		시설비		민간자본보조		비고
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
합 계	455	7,728	273	5,180	182	2,548
읍면동숙원사업	227	4,853	178	3,663	49	1,190	계 7,728 본예산 7,107 성립전 380 이 월 241
포괄(POOL)사업	50	1,100	20	600	30	500
주민편익사업	168	1,655	65	797	103	858
유지관리사업	10	120	10	120

※ 예산구분 : 7,728백만원(도비 420, 시비 7,308)

□ 추진실적

◦ 소규모 주민숙원사업(273건 / 5,180백만원) - 공정율 95%

- 준  공 : 256건 / 4,591백만원

- 공사중 :   8건 /  360백만원

- 미발주 :   9건 /  229백만원

◦ 민간자본보조사업(182건 / 2,548백만원) - 공정율 58%

- 준  공 : 76건 /   827백만원

- 공사중 : 33건 /   649백만원

- 미발주 : 73건 / 1,072백만원

□ 금후계획

◦ 소규모 주민숙원사업 연내 준공 완료 추진

수해 복구사업

□ 사업개요

◦ 피해기간 : ‘11.7.9~10(호우피해), ’11.8.6~10(태풍 「무이파」)

◦ 피 해 액 : 2,064백만원/ 46건(7월피해 637백만원, 8월피해 1,427백만원

◦ 복구금액 : 3,786백만원(7월피해 404백만원, 8월피해 3,382백만원)

구 분		건 수	사업비(백만원)				비 고
			합계	국비	도비	시비
합 계		46	3,786	1,457	942	1,387
11.7월 호우피해		27	404	-	-	404	자력복구
11.8월 호우피해	소 계	19	3,382	1,457	942	983
	지원복구	17	3,341	1,457	942	942
	자력복구	2	41	-	-	41

◦ 예산현황 : 2011년도확보-883백만원, 2012년도 계획-2,903백만원

구 분		총계	2011년 사업비				2012년 사업비				비 고
			합계	국비	도비	시비	합계	국비	도비	시비
합 계		3,786	883	258	-	625	2,903	1,199	942	762
11.7월호우피해		404	404	-	-	404	-	-	-	-	자력 복구
11.8월호우피해	소계	3,382	479	258	-	221	2,903	1,199	942	762
	지원복구	3,341	438	258	-	180	2,903	1,199	942	762
	자력복구	41	41	-	-	41	-	-	-	-

□ 추진실적

◦ 지방하천 수해복구 9개지구 L= 3.72km 6월 공사완료

◦ 소  하  천 수해복구 9개지구 L= 1.25km 7월 공사완료

◦ 기타 수해복구 28개지구 L=3km 7월 공사완료

2012년도 유관기관 투자사업 계획

기관명	사 업 명	사업량 (km)	사 업 비 (억원)					비고 (사업 기간)
			총 사업비	기투자	‘11 투자	‘12 예산 확보현황	이 후 투 자
계	11개사업	160.517	13,080	3,409	1,177	1,637	6,857
한 국 도 로 공 사	소계(1개사업)	75.87	9,854	2,244	670	1,100	5,840
	88고속도로 (담양~함양)확장	75.87	9,854	2,244	670	1,100	5,840	‘06~ ‘15년
익 산 지 방 국 토 관리청	소계(7개사업)	59.887	3,079	1,137	465	457	1,017
	남원 ~ 곡성 도로 건설공사	12.02	1,432	660	200	171	401	‘05~ ‘13년
	옥과 ~ 적성 도로 확장공사	8.28	399	104	40	50	205	‘09~ ‘17년
	오수 ~ 월락 도로확장공사	11.52	637	136	40	50	411	‘07~ ‘16년
	섬진강수계치수 수지제 개수공사	10.5	231	150	40	41	-	‘05~ ‘12년
	요천 창산제 외 4개소 보강공사	16.7	266	87	88	91	-	‘09~ ‘12년
	요 천 교 재가설공사	0.167	67	-	30	37	-	‘11~ ‘13년
	운 봉 교 통수단면 부족 개선공사	0.70	47	-	27	20	-	‘09~ ‘12년
전 라 북 도	소계(3개사업)	24.76	147	28	42	65	-
	섬진강살리기 사업 3-2공구	22.7	129	28	32	69	-	‘10~ ’13년
	안전한 보행환경 조성사업 (국지도60호- 수지호곡)	0.5	3	-	3	-	-	‘11~ ‘12년
	위험도로개선공사 (지방도745호- 대산 대곡)	1.56	15	-	7	8	-	‘11~ ‘13년