2012. 10

2012 주요업무 추진실적

도   시   과

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2012년 주요업무 결산
□ 2012년 주요업무 추진실적
	◦도시기본계획 및 관리계획 수립(변경)
	◦광한루원 주변 지구단위계획 수립
	◦도통1․2택지 지구단위계획 수립
	◦구 남원역 부지개발사업 (중앙공원조성 기본계획 수립)
	◦국립공원해제지역 도시관리계획 변경 수립
	◦반선․달궁지구 지구단위계획 수립
	◦안전한보행환경 조성사업
	◦신역사 대로 개설공사
	◦도시가로망 중․소로 개설공사
	◦개발촉진지구 기반시설(도로)사업
	◦신 역세권(신정지구) 도시개발사업
	◦향교동 체육시설조성(공동묘지이전)
	◦노암 제3농공단지 조성사업

일  반  현  황

□ 기  구

						도시과장
						주 재 옥
도 시 계 획						도 시 정 비							지 역 개 발								산업용지
성 길 경						김 회 정							김 부 환								김 오 진
◦도시기본계획수립 ◦도시관리계획수립 ◦도시계획시설 결정 및 인가 ◦지구단위계획수립 ◦개발행위허가 ◦공원 점․사용 허가 ◦전문건설업관리 ◦충무계획 수립						◦도시가로망사업 시행 및 정비 ◦시의 국도정비 ◦시의 시도정비 ◦전선지중화사업 ◦안전한 보행환경 조성사업							◦택지 및 도시 개발사업 ◦온천개발 업무 ◦개발촉진지구 기반시설 사업 ◦대규모 기반조성 사업								◦일반산업단지 조성 ◦농공단지 지정 및 조성 ◦산업용지 및 개별입지 분석 ◦농공단지 유지관리사업 추진 ◦산업용지 보상 및 수용재결 추진

□ 인  력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	비고
정 원	20	1	5	7	6	-	1
현 원	18	1	5	6	2	1	3	청경: 1 별 도
증 감	△2	-	-	△1	△4	1	2

□ 도시관리계획

(단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	29.87 (4.0)	276.94 (36.8)	338.00 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역 (용도지역별)

(단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	29.871 (100%)	0.063 (0.21)	6.347 (21.25)	0.021 (0.07)	0.959 (3.21)	1.061 (3.55)	20.437 (68.42)	0.983 (3.29)
남 원	25.871 (100%)	0.063 (0.24)	5.351 (20.69)	0.016 (0.06)	0.784 (3.03)	1.061 (4.10)	18.596 (71.88)	-
운 봉	1.66 (100%)	-	0.505 (30.42)	-	0.093 (5.60)	-	0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.34 (100%)	-	0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)	-	1.141 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역 도로현황(도시계획시설)

(단위 : ㎞)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	연장	노선수	연장	노선수	연장
계	760	663	433	520	327	143	78
대 로	34	70	21	65	13	5	93
중 로	128	202	76	122	52	80	60
소 로	598	391	336	333	262	58	85

□ 건설업체 현황

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
323	512	287	470	236	408	51	62	36	42

2012년 주요업무 결산

	주요성과
지역개발 기틀 마련을 위한 도시관리계획 수립 도시기반시설 확충 및 도시환경개선 기여 신속한 민원업무처리로 행정신뢰도 구축 도시개발사업에 대한 타당성 검토 및 사전 문화재 형상변경 추진

□ 지역개발을 위한 도시기본 및 관리계획 수립 추진

◦ 도시기본계획 일부변경 : 공원 및 유원지 변경 등 4개분야

◦ 용도지역 등 : 3건(관리지역 추가세분, 국립공원구역변경 등)

◦ 지구단위계획 : 3건(반선․달궁, 광한루원주변, 도통1․2택지)

◦ 도시계획시설 결정(변경) 및 사업인가 관리 : 14건

- 골프장(3), 공용주차장(7), 도로(2), 유수지(1), 기타(1)

□ 도시기반시설 확충으로 시민생활 편의도모

◦ 도시가로망 신설(개설) : 18지구(준공 3, 공사중 3, 용지보상 12)

◦ 안전한 보행환경 조성사업 : 우수자치단체 선정(인센티브 5억-2013)

◦ 향교동 체육시설조성(공동묘지이전) 계획 수립 : 25,700㎡

□ 주민 소득증대를 위한 기반시설 추진

◦ 개발촉진지구 기반시설 확충 사업  : 도로개설 4지구 L=16.0㎞

- 1차분 : 완료/ 2차분 :  공사착공(3개소), 용역완료(1개소)

□ 친절하고 신속한 민원처리로 행정신뢰도 제고

◦ 개발행위 허가 및 협의 : 664건 (평균  5일 단축처리)

◦ 전문건설업 등록․신고 : 120건 (평균  7일 단축처리)

	아쉬운 점
편입 토지보상 협의 지연으로 인한 건설공사 조기완공 차질 ☞ 토지수용 절차이행으로 토지매수완료 및 사업공정확보

2012년 주요업무 추진실적

도시기본계획 및 관리계획 수립(변경)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 행정구역 전체

◦ 면    적 : 752.81㎢

◦ 과업내용 : 도시기본계획 및 도시관리계획 수립(변경)

- 기본계획 : 토지이용계획, 공원·녹지계획, 도시기반시설 계획 및 지표조정 등

- 관리계획 : 용도지역 및 고도지구 일부변경, 공원·유원지 구역계 조정,

한빛중앞 도로계획 등

◦ 용 역 비 : 304백만원

◦ 과업기간 : 2011. 3. ~ 2012. 12./ 도화엔지니어링, 인우건설

□ 추진실적

◦ 도시기본 및 관리계획 수립(변경) “안” 입안      : 2012. 7. 30

◦ 도시기본계획 공청회 및 의견청취(총 19건/ 5명)  : 2012. 8. 28

◦ 도시기본 및 관리계획 시의회의견 청취(원안찬성) : 2012. 9. 19

◦ 도시기본계획 시도시계획위원회 자문(조정자문)   : 2012. 9. 25

□ 금후계획

[2025년 남원도시기본계획 일부변경(안)]

◦ 도시기본계획 일부변경(안) 승인 신청(시→전북도) : 2012. 10.

◦ 도시기본계획 일부변경 승인 공고(시장)          : 2012. 11.

[남원도시관리계획 변경․결정(안)]

◦ 관련기관(부서) 협의 및 시도시계획위원회 자문   : 2012. 10.

◦ 도시관리계획 변경․결정(안) 신청(시→전북도)    : 2012. 11.

◦ 지형도면승인 고시(시장)                        : 2012. 12.

광한루원 주변 지구단위계획 수립

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 쌍교동·금동 지내 광한루원 주변

◦ 면    적 : 180,000㎡(관광타운조성사업 구역)

◦ 수립내용 : 토지이용계획, 기반시설, 건축․교통․경관계획 등

※ 한옥마을조성, 거점시설, 탐방시설, 가로환경정비 등

◦ 용 역 비 : 178백만원

◦ 용역기간 : 2011. 6. ~ 2012. 11./ 대도엔지니어링, (주) 두레

□ 추진실적

◦ 용역 과업중지                        : 2011. 7. 29 ~ 2012. 3. 7

◦ 기초조사 및 현황분석                 : 2012. 3. 7 ~ 6. 30

◦ 부문별 계획수립                      : 2012. 7. 1 ~ 현재

□ 금후계획

◦ 도시관리계획 입안(안) 작성                       : 2012. 10.

◦ 주민의견청취 및 관계부서 협의                   : 2012. 10. ~ 11.

◦ 시 도시계획위원회 자문/ 도 도시․건축공동위 심의 : 2012. 11. ~ 12.

◦ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시         : 2012. 12.

도통1․2택지 지구단위계획 수립

□ 사업개요

◦ 대상지역 : 167,219㎡

- 1지구 99,813㎡(시청일원)

- 2지구 67,406㎡(고속터미널일원)

◦ 과업내용 : 토지이용계획, 기반시설계획, 건축․교통․경관계획 등

◦ 용 역 비 : 377백만원(‘11예산 : 177백만원)

◦ 사업기간 : 2009. 1. ～ 2012. 11./ (주)삼안

□ 추진실적

◦ 용역 계약 및 착수(최초)                        : 2009. 4. 29

◦ 용역 3차분 착수(최종분)                        : 2011. 5. 17

◦ 용역중지(시장 보궐선거 및 행정절차이행)        : 2011. 7. 25

◦ 도시관리계획 결정(변경) 입안                   : 2012. 3. 27

◦ 주민열람 및 관련기관․부서 협의               : 2012. 3. 30 ~ 5. 29

◦ 시도시계획위원회 자문(2회)                     : 2012. 7. 5/ 9. 25

□ 금후계획

◦ 도시관리계획 결정(변경) 승인신청(도)            : 2012. 10.

◦ 도 도시·건축공동위원회 심의                    : 2012. 11.

◦ 도시관리계획 변경·결정 및 지형도면승인 고시    : 2012. 11.

구 남원역 부지개발사업

(중앙공원조성 기본계획 수립)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 동충동, 향교동 일원(구역사부지)

◦ 면    적 : 중앙공원 51,300㎡(전체부지 127,216㎡)

◦ 과업내용

- 현황조사 및 여건분석/ 기본구상 및 타당성조사연구/ 부문별 계획

- 사업시행계획/ 공원관리방안 등

◦ 용 역 비 : 98백만원

◦ 용역기간 : 2011. 6. ~ 2012. 10./ (주)대화엔지니어링

□ 추진상황

◦ 중앙공원 조성 기본계획수립 착수              : 2011. 6. 21

◦ 구역사부지개발 시민아이디어 공모(29건)        : 2011. 8. 10 ~ 9. 8

◦ 공원조성계획(안) 수립 중                      : 2012. 4. ~ 현재

□ 금후계획

◦ 공원조성계획 입안(안) 수립                      : 2012. 10.

◦ 주민 의견청취 및 관련행정기관 협의             : 2012. 10.

◦ 시 도시계획위원회 심의                         : 2012. 10.

◦ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시        : 2012. 11.

◦ 중앙공원 조성계획 수립 후 시행방안 마련         : 2013 ~

국립공원해제지역 도시관리계획 변경 수립

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 주천면, 산내면 일원

◦ 면    적 : 1.213㎢(국립공원 해제지역)/ 2011. 1. 10해제고시(환경부)

◦ 과업내용 : 용도지역 변경

(자연환경보전지역 → 보전·생산·계획관리, 농림지역)

◦ 용 역 비 : 164백만원

◦ 용역기간 : 2011. 3. ~ 2012. 7./ (주)우리기술단 윤철준

□ 추진실적

◦ 용역계약 및 착수                       : 2011. 3. 9

◦ 주민설명회 개최(2회)                    : 2011. 10. 6/ 11. 9

◦ 도시관리계획 결정(변경) 입안            : 2011. 12. 16

◦ 주민의견청취 열람공고(20일간)           : 2011. 12. 21

◦ 관련기관․부서 협의                    : 2011. 12. 20 ~ 2012. 3. 16

◦ 시의회 의견청취                        : 2012. 1. 17

◦ 시 도시계획위원회 자문                 : 2012. 4. 13

◦ 도 도시계획위원회 심의                 : 2012. 5. 17

◦ 도시관리계획 결정(변경) 고시(전북도지사) : 2012. 7. 20

◦ 지형도면 고시(남원시장)                 : 2012. 7. 27

□ 금후계획

◦ 해당없음.

반선․달궁지구 지구단위계획 수립

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 반선․달궁지구 지구단위계획수립

◦ 위    치 : 산내면 부운리, 덕동리 일원

◦ 사 업 량 : 170,421㎡(반선 69,344㎡, 달궁 101,077㎡)

◦ 과업내용 : 토지이용계획, 기반시설계획, 건축․교통․경관계획 등

◦ 용 역 비 : 148백만원

◦ 용역기간 : 2012. 2. ~ 2012. 12./ (유)신한개발기술단

□ 추진실적

◦ 지구단위계획 수립 용역 착수                   : 2012. 2. 27

◦ 기초자료 수집 및 현장조사                     : 2012. 3. ~ 4.

◦ 기초조사 및 현황분석                          : 2012. 5.

◦ 기본구상 및 부문별계획 수립 중                : 2012. 6. ~ 현재

□ 금후계획

◦ 지구단위계획 입안(안) 수립                        : 2012. 10.

◦ 주민의견청취 및 관련부서 협의                    : 2012. 10. ~ 11.

◦ 시 도시계획위원회 자문/ 도 도시․건축공동위 심의 : 2012. 11.

◦ 지구단위계획 결정(변경) 및 지형도면 고시          : 2012. 12.

안전한보행환경 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 조산동 보건소 앞 ~ 부동교 (요천교)

◦ 사 업 량 : 인도설치 L=500m, B=5m(양쪽)

◦ 사업기간 : 2012. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600, 시비 600)

□ 추진실적

◦ 문화재 현상변경협의 완료                            : 2012. 2. 8

◦ 공사 착공                                            : 2012. 4. 24

◦ 안전한보행환경 조성사업 우수사례 발표(행안부)      : 2012. 5. 24

⇒ 우수자치단체 선정(2등) : 2013년 사업비 5억원 인센티브

◦ 공사 추진 (공정 75%)

: 구조물공(옹벽설치 완료), 우수관로 시공, U형수로관 설치

□ 금후계획

◦ 공사 추진                                         : 2012. 10 ~ 11.

- 인도부 경계석(보차도 , 대지) 설치                : 2012. 10.

- 가로등(LED등) 설치                             : 2012. 10.

- 가로수(왕벗나무) 식재                            : 2012. 11.

- 인도부(인도, 자전거도로) 포장 및 차선도색        : 2012. 11.

◦ 공사 준공                                         : 2012. 12.

신역사 대로 개설공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동 의총로 3거리 ~ 시청로 3거리

◦ 사업규모 : 도로개설 L=1.3㎞, B=35m

◦ 사 업 비 : 18,000백만원 (2012년 보상비 600)

◦ 사업기간 : 2012. ~ 2017

□ 추진실적

◦ 분할측량 실시(지적공사~신협) 및 지장물 조사  : 2012. 2. ~ 3.

◦ 보상계획 열람공고                            : 2012. 3. 29

※ 열람공고 기간 : 2012. 3. 29 ~ 4. 11

◦ 감정평가 실시                                : 2012. 5. 15

◦ 용지보상 실시 완료(1차 6필지/3,819㎡)         : 2012. 5. ~ 6.

□ 금후계획

◦ 문화재 현상변경 등 문화재청 사전 협의      : 2012. 10. ~ 12.

도시가로망 중·소로 개설공사

□ 개    요

◦ 사업규모 : 17개지구, L=4.88㎞

◦ 총사업비 : 19,995백만원 ( 2012 : 3,920 )

◦ 사업기간 : 2004 ~ 2014(11개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2012	2013이후
계	17개지구(L=4.88km)	20,045	7,725	3,920	8,400
중 로	6개지구(L=2.73km)	12,285	5,585	1,750	4,950
소 로	11개지구(L=2.15km)	7,760	2,140	2,170	3,450

※ 지구별 내역 : 붙임

□ 추진실적

◦ 공사완료(4지구)

- 남원여고 앞 중로, 새터 중로(2차분), 왕정 1․5통 소로, 인월 현미

아파트 옆 소로

◦ 공사중(2지구) : 죽항 리버사이드 옆(70%), 비사벌아파트옆(70%)

◦ 보상(11지구)

- 쑥골길(100%), 용정마을(60%) 금회 보상완료, 금동LH아파트옆(29%),

광천남길(60%), 조산10통(64%), 봉당길(38%), 동도 1ㆍ4길(27%), 서문주차장 ~

공설시장간(64%), 인월공용주차장(83%), 천거2길(50%), 검멀2길(50%)

보상 추진

□ 금후계획

◦ 공사(2지구) : 죽항 리버사이드옆, 비사벌 아파트옆 소로 공사완료

◦ 보상(6지구) : 광천남길(70%), 조산10통(100%), 봉당길(55%), 동도 1ㆍ

4길(35%), 서문주차장~공설시장간(80%), 검멀2길(61%)

보상 추진

【2012년도 도시가로망 지구별 사업내역】

□ 도시가로망 정비사업(도시계획시설사업)               (단위 : 백만원)

구분	사 업 명	위치	사업량	총 사업비	기투자	‘12계획	이후	비 고 (추진계획)
계			18개지구	37,995	7,725	4,520	25,750
대로	소 계		1개지구	18,000	-	600	17,400
	신역사대로	향교	L=1,300m, B=35m	18,000	-	600	17,400	보상추진(10%)
중로	계		6개지구	12,235	5,585	1,750	4,900
	남원여고앞중로	왕정	L=850m, B=20m	4,935	4,335	600	-	공사완료
	새터중로	신정	L=600m, B=20m	2,600	1,000	500	1,100	공사추진(42%)
	금동LH아파트옆중로	조산	L=511m, B=12m	1,800	100	200	1,500	보상추진(29%)
	광천남길중로	향교	L=440m, B=15m	1,600	150	200	1,250	보상추진(70%)
	용정마을앞중로	향교	L=200m, B=15m	700	-	100	600	보상추진(60%)
	쑥골길중로	향교	L=130m, B=15m	600	-	150	450	보상완료
소로	계		11개지구	7,760	2,140	2,170	3,450
	왕정1․5통소로	왕정	L=220m, B=8m	840	540	300	-	공사완료
	리버사이드옆소로	죽항	L=190m, B=8m	1,000	800	200	-	공사완료
	조산10통소로	조산	L=300m, B=8m	700	200	50	450	보상완료
	서문주차장~공설시장간소로	금동	L=123m, B=6m	700	200	200	300	보상추진(80%)
	동도1․4길소로(창주서원앞)	도통	L=460m, B=6m	900	100	100	700	보상추진(35%)
	봉당길소로(동북교회앞)	동충	L=290m, B=8m	1,300	100	300	900	보상추진(55%)
	천거2길소로	천거	L=100m, B=6m	800	100	200	500	보상추진(50%)
	검멀2길소로	금동	L=146m, B=6m	900	100	300	500	보상추진(61%)
	인월현미아파트옆소로	인월	L=50m, B=6m	70	-	70	-	보상ㆍ공사완료
	비사벌아파트옆소로	왕정	L=185m, B=6m	300	-	300		보상ㆍ공사완료
	인월공용주차장옆소로	인월	L=90m, B=6m	250	-	150	100	보상추진(83%)

□ 시가지 정비사업(비 도시계획시설사업)                    (단위 : 백만원)

구분	사 업 명	위치	사업량	사업비	비 고
시가지정비	소 계		9개사업	2,525
	도시미관정비	남원시일원	12개소	300	Pool 예산
	도로구조정비	남원시일원	10개소	300	Pool 예산
	시가지인도정비	남원시일원	15개소	300	Pool 예산
	인월I․C진입로확장	인월면	L=100m, B=4m	100	연내준공
	요천로안전한보행환경조성	조산동	L=1,000m B=5m	1,225	연내준공
	광치농공단지연결도로확장공사	광치동	L=435m, B=8m	100	연내준공
	광치로3호선포장공사	광치동	L=900m, B=5m	200	공사추진

개발촉진지구 기반시설(도로)사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 개발촉진지구 일원 (운봉읍, 송동면, 사매면)

◦ 사업규모 : 도로확.포장 4개노선 L=16.0km, B=8~20m

◦ 총사업비 : 421억원(국비 100%)  ※2012년 : 10,000백만원

◦ 사업기간 : 2010 ～ 2014년(5년)

◦ 지구별 내역                                          (단위:백만원)

사 업 명	위 치	사업규모	총사업비	기투자	2012	‘13이후	비 고
계	4개소	L=16.0km	42,100	7,624	10,000	24,476
혼불문학배경지 연결도로	사매면 서도리	L= 3.5km B= 10～12m	6,700	1,106	2,000	3,594	․공기: ‘11. 5.18 ~ ’14. 5. 1 ․용지보상: 69%
국악의성지 연결도로	운봉읍 가산리	L= 4.6km B= 8~10m	7,500	1,615	3,000	2,885	․공기: ‘11. 5.11 ~ ’14. 4.24 ․용지보상: 62%
허브밸리주변 관광순환도로	운봉읍 용산리	L= 4.0km B= 12～15m	11,500	4,650	3,000	3,850	․공기: ‘11.6.8 ~ ’14.12.31 ․용지보상: 62%
노암농공단지 연결도로	송동면 장국리	L= 3.9km B= 20m	16,400	253	2,000	14,147	․용역: ‘11.4.18 ~ ’12. 6. 22 ․용지보상 : 미시행

□ 추진실적

◦ 기반시설(도로) 실시설계용역 완료 (4개노선 L=16.0㎞) : ‘10. 2. 19 ~ ’12. 6. 22

◦ 기반시설(도로) 개설사업 공사시행 : 2010. 10 ~ 2014. 12

- 혼불문학 : L=2.04㎞(용․배수로, 구조물공), 교량 2개소(월평교, 로봉1교) / 공정 32%

- 국악의성지 : L=3.74km(용․배수로, 보조기층공) / 공정 31%

- 허브밸리 : L=2.5km(용․배수로), 용산교 확장 / 공정 33%

- 노암농공단지 : 실시설계 용역완료, 실시계획인가협의, 사업지구 변경추진(5회)

□ 금후계획

◦ 혼불문학 : L=2.04㎞(용․배수로, 구조물공), 로봉 2교 가설

◦ 국악의성지 : L=3.74km(용․배수로, 구조물공, 기층포장 L=1.0km)

◦ 허브밸리 : L=2.5km(용․배수로, 구조물공), 교량(산덕교, 동천교)재가설

◦ 노암농공단지 : 지구 및 개발계획 변경추진(노암농공단지연결로+북남원I.C연결로)

신 역세권(신정지구)도시개발사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 신정동 29-4번지 일원(남원역 앞)

◦ 사업규모 : 19,510㎡(도로개설 6,286㎡, 단지조성 13,224㎡)

◦ 총사업비 : 3,290백만원(시비)   ※2012년 : 미확보

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2014년(4개년)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2012	2013이후	비고
합 계	3,290	590	-	2,700
도로 개설	1,890	150	-	1,740
단지조성	1,400	440	-	960

□ 추진실적

◦ 구역지정․개발계획수립 및 실시설계 용역 시행 : 2011. 5. 3 ~ 2012. 12. 4

◦ 시행조례제정, 도시개발사업 타당성 검토  : 2011. 12 ~ 2012. 2. 23

◦ 도시계획위원회 심의, 구역지정 및 개발계획수립 고시 : 2012. 2. 23 ~ 4. 27

◦ 도시개발사업시행자 지정공고(시행자: 남원시장) : 2012. 5. 11

- 시행방식 : 도시개발법에 의한 혼용방식(수용․사용 + 환지)

◦ 토지평가협의회 설치․구성 및 운영계획 수립 : 2012. 6. 13 ~ 7.12

- 신정지구 도시개발사업 토지평가협의회 위원 위촉(11명)

◦ 구역지정 변경, 개발계획 변경 및 실시계획인가를 위한 주민공람공고 : 2012. 8. 24

□ 금후계획

◦ 실시계획인가 및 기본․실시설계용역 완료 : 2012. 12

- 환지계획설계(평가등)시행 및 실시계획인가

◦ 편입용지(도로 및 단지조성) 및 지장물 보상 : 2012. 11 ~ 2013. 12

◦ 공사 시행 (도로 및 단지조성) : 2013. 12 ~ 2014. 6

◦ 환지 및 등기, 환지청산금정산, 준공 : 2014. 6 ~ 12

향교동 체육시설조성(공동묘지이전)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 향교동 산4-1번지 일원 (백공산4가 서편)

◦ 사업규모 : 25,700㎡ (분묘이장, 체력단력장, 산책로 등)

◦ 총사업비 : 3,356백만원 (시비 3,356)  ※ 2012년 소요예산 :190백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2016 (5개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량	총사업비	2012	2013이후	비고
합 계		3,356	190	3,166
용역비 등	체육시설결정	241	180	61
분묘이장	600기	930	10	920	여성가족과
토지및지장물	5필지/5,785㎡	185	-	185
공사비	토목+조경등	2,000	-	2,000

□ 추진실적

◦ 체육시설 조성(공동묘지이전) 계획 수립         : 2012. 3. 26

- 1단계(도시계획 시설 결정, 분묘이장, 용지 보상) : '12 ~ '13

- 2단계(공사시행 및 사용개시) : '14 ~ '16

◦ 용역비 예산1회 추경확보(190백만원) : 2012. 6. 11

- 분묘이장 DB구축(10), 체육시설결정 및 실시설계(180)

◦ 도시계획(체육시설)결정 및 실시설계용역 착수 : ‘12. 7. 30 ~ ’13. 7. 30

□ 금후계획

◦ 공유재산 관리계획 승인 : 2012. 9 ~ 2012. 11

◦ 실시설계 및 도시계획시설결정, 각종 인․허가 완료 : 2013. 7

◦ 분묘이장, 편입용지 및 지장물 보상 : 2013. 1 ~ 2013. 12

◦ 공사시행 및 사용개시 : 2014. 1 ~ 2016. 12

노암 제3농공단지 조성사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 산48-5번지 일원

◦ 조성면적 : 324,819㎡/ 입주규모 : 20개 업체 정도

◦ 유치업종 : 식료, 음료, 금속가공, 전자․컴퓨터․통신, 화장품 등

◦ 총사업비 : 25,500백만원 (광특 5,000, 도비 500, 시비 20,000)

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2014 (6개년간)

◦ 연도별 투자계획                                 (단위:백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2012	2013	2014	비 고
계	25,500	8,737	1,905	10,847	4,011
광 특	5,000	2,698	1,455	847
도 비	500	50	450
시 비	20,000	5,989	-	10,000	4,011

□ 추진실적

◦ 익산청 토사반출 100만㎥ 중 65만㎥반출( ‘12.8 ~ ‘13.3 )

◦ ‘11. 12. 14 : 농공단지 기반조성공사 착공

- 토공 10만㎥ 운반성토 및 소나무 이식 690주(현장430, 솔향260 )

◦ ‘12. 09. 07 : 전라북도 지방토지수용위원회 재결 접수

- 10필지 54,451㎡, 묘지, 지장물 등 33건

□ 금후계획

◦ 암 발파 및 수목 이식공사 마무리

◦ 가옥(4가구) 및 창고, 고물상 등 이주, 이전 및 폐기물 처리

◦ 지하매설물 추진 등 단지조성 토목공사 추진