2013. 1

2013년 주요업무 계획

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2012년 주요업무 결산

□ 2013년 중점 추진방향

□ 2013년 주요업무 계획

◦ 도로유지관리사업

◦ 시도 1호선 확장공사

◦ 읍면지역 시도 확‧포장사업

◦ 농어촌도로 확‧포장사업

◦ 통행불편 마을진입로 정비사업

◦ 북남원 나들목 진입도로 개설

◦ 하천정비사업

◦ 람천 고향의 강 조성사업

◦ 광치천 도심하천 생태복원사업

◦ 하천유지관리 사업

◦ 소규모 주민숙원 사업

◦ 수해복구사업

◦ 2013년도 유관기관 투자사업 계획

일  반  현  황

□ 기    구

													건설과장
													진 영 신
건설행정담당							도 로 담 당													하 천 담 당										소규모시설담당
이 형 민							조 남 도													김 종 학										이 영 진
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속							읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 교통소통대책사업 통행불편 도로사업 도로 유지관리사업													치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가											소규모 주민숙원사업 포 괄(POOL)사 업 보 조 사 업 소규모시설 유지관리

□ 인    력

구분	계	일 반 직							계약직	기 타 직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	전 임	소계	청원경찰	도 로 보수원	무기계약
정원	44	24	1	4	6	5	2	6	-	20	7	12	1
현원	41	22	1	4	7	1	3	4	2	19	7	11	1
증감	△3	△2	-	-	1	△4	1	△2	2	△1	-	△1	-

□ 도로 현황

(2011.12.31기준 / 단위:km)

도로별	노선수	총연장	포 장	포장율(%)	비 고
합 계	839	1,375.4	727.1	52.9
고 속 국 도	2	69.7	69.7	100.0
국 도	5	106.2	106.2	100.0
국가지원지방도	2	46.4	46.4	100.0	전북 96.6%
지 방 도	7	149.0	139.8	93.8	전북 78.6%
시 도	472	174.4	89.5	51.3	전북 67.2%
읍 면 시 도	20	193.9	100.9	52.0	전북 46.3%
농 어 촌 도	331	635.8	174.6	27.4	전북 31.6%

□ 하천 현황

(2011.12.31기준 / 단위:km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	42	283.2	432.9	352.5	80.4	81.4
국가하천	2	36.2	40.1	40.1	-	100.0
지 방 하 천	40	247.0	392.8	312.4	80.4	79.5	전북 79.3%

□ 소하천 현황

(2011.12.31기준 / 단위:km)

총개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
		계	개 수	미개수
349	392.1	690.1	450	240.1	65.2	전북 21.7%

2012년 주요업무 결산

	주 요 성 과
철저한 하천제방 관리로 2012년 전라북도 제방정비 최우수기관 선정 광치천 도심하천 생태복원사업 국가예산확보 180억(국비 108억, 시비 72억) 도로기능 효율성 제고를 통한 지역소득기반 기틀마련

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리-15개소/1,263백만원

◦ 도로․교량 유지관리사업 : 13개소 /  795백만원

◦ 위험도로 구조개선사업   :  1개소 /  228백만원

◦ 회전교차로 설치사업     :  1개소 /  240백만원

◦ 도로 제설작업 실시         :   13회 /(55개노선, 제설기 21, 살포기 11대 동원)

□ 지역 균형발전을 위한 불편도로 개선-20개노선/12,287백만원

◦ 읍면지역시도 확․포장사업    :  4개노선 / 2,797백만원

◦ 농어촌도로 확․포장사업      :  4개노선 / 1,680백만원

◦ 통행불편 마을진입로 정비사업 :  9개노선 / 2,320백만원

◦ 기업유치 기반시설 확충사업   :  3개노선 / 5,490백만원

◦ 국도병목지점 5단계 기본계획 반영 : 교차로개선 8/ 입체횡단 1/ 버스정차대 2

□ 재해 사전예방을 위한 생태하천 조성-40개지구/17,985백만원

◦ 지방하천 정비사업  :  5개하천 / 10,134백만원

◦ 소하천 정비사업    :  3개하천 /  4,193백만원

◦ 람천 고향의 강        :  1개하천  /  1,133백만원

◦ 하천유지관리사업       :  31개지구 /  2,525백만원

□ ‘11.7.9～10(호우피해), ‘11.8.6～10(무이파) 수해복구사업 추진

◦ 수해복구사업        :  46개지구 /  3,786백만원

□ 주민 삶의 질 향상을 위한 소규모 주민숙원사업 추진

◦ 477건 / 7,764백만원(시설비 280건/5188백만원, 민간자본보조 197건 / 2,576백만원)

	아쉬운 점
예산확보의 어려움으로 계획년도 내에 공사 완공 차질 불가피

2013년 중점 추진 방향

완벽한 기반시설 구축으로 사랑의 도시 건강한 남원 건설

	중 점 추 진 과 제
◦ 쾌적하고 안전한 도로유지관리 - 도로교량 유지관리 점검으로 안전한 도로환경 구축 - 교통사고 잦은곳, 위험도로 정비사업으로 사전 사고예방 ◦ 불법행위 근절 기초질서 확립 - 노상적치물, 과적 지도단속으로 기초질서 확립 ◦ 지역균형 발전 체계적 도로망개설 - 읍면시도 및 농어촌도로 정비사업으로 소득기반 확충 - 교통소통 및 통행불편도로 정비로 도로 환경개선 ◦ 자연 친화적 생태하천조성 - 미개수 하천의 정비를 통하여 사전 재해예방 - 생태계가 살아 숨쉬는 친근한 하천 환경조성 ◦ 삶의 질 향상 주민숙원사업 - 오랜 주민숙원사업 해결로 살기 좋은 마을 환경 조성

2013년 주요업무 계획

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 사업개요 : 6개분야 - 1,255백만원(국비 215백만원, 시비 1040백만원)

사 업 명	사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계	6개분야		1,255
위험도로 구조개선사업	주생 도산	L=0.31km	350	국비 50% 시비 50%
교통사고 잦은곳 정비사업	어현동	1식	80	〃
도로․교량 유지관리 보수	관내 관리도로	1식	450	시비 100%
시특법 대상 교량 정밀점검	관내 관리교량	8개소	70	〃
안전시설물․도로표지판 정비	관내 관리도로	1식	85	〃
요천로 포장 덧씌우기	식정동 일원	L=1.8km	220	〃

□ 추진계획

◦ 위험도로 구조개선 공사시행           : 2012. 11월 ~ 2013. 10월

◦ 사업대상지 조사 및 설계용역(5개분야)  : 2013. 1월 ~ 3월

◦ 공사착공(5개분야)                     : 2013. 3월 ~ 4월

◦ 공사완료(5개분야)                     : 2013. 5월 ~ 12월

□ 기대효과

◦ 노후 및 기능 저하된 도로정비로 이용자의 편의증진 도모

◦ 안전시설물 및 도로표지판 정비로 교통사고 예방기여

◦ 교량점검 및 정비를 통한 재해위험요소 사전제거

시도1호선 확장공사

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 오수 ～월락간 도로 확장공사

◦ 위    치 : 향교동(백공산4가) ～ 용정동(오성주유소)

◦ 사 업 량 : L=2.82km, B=26.0～29.5m

◦ 사 업 비 : 6,264백만원(국비) / 사업기간 : 2012 ～ 2016년

◦ 토지보상 : 1,120백만원(‘11년 200, ’12년 600, ‘13년 320)

□ 추진실적

◦ 오수～월락간 확장공사에 포함 시행 건의    : 2005 ~ 2007

◦ 오수～월락간 확장공사 착공(시도1호선 포함) : 2009. 04. 02

※ 사업시행 건의(시→익산청)시 행정절차와 토지매입 남원시 시행조건

◦ 편입토지 분할측량 실시                   : 2011. 08 ~ 09월

◦ 편입토지 감정평가 및 보상협의 통보       : 2011. 11 ~ 12월

◦ 손실보상 협의추진                        : 2012

(보상율 66% : 전체 59필지 중 39필지 협의완료)

□ 추진계획

◦ 손실보상 지속추진 : ‘13. 1 ~ ’13. 12월

- 토지소유자 유선․방문 협의독려 및 토지수용 추진

읍면지역 시도 확․포장사업

□ 개    요

◦ 계      획 : 5개노선/12.51km/ 20,297백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 5개노선/12.51km/ 11,438백만원

- 사업기간 : 2007 ~ 2015(9개년)

◦ 2013 시행 : 5개노선 / 12.51km / 4,260백만원

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
				계	기투자	2013	2013이후
계		5개노선	12.51	20,297	11,438	4,260	4,599	77
계속 사업	용평~다산	보절면	2.91	5,700	2,714	900	2,086	63	‘08~’15
	장교~임리	운봉읍	4.00	5,800	4,800	1,000	-	100	‘07~’13
	대신~대신	사매면	3.58	6,000	3,297	1,000	1,703	72	‘08~’14
	방촌~택촌	금지면	0.90	597	37	560	-	100	‘12~’13
	송기~백평	송동면	1.12	2,200	590	800	810	63	‘12~’14

※ 총 계획 : 20개노선/193.9km 중 101.6km완료(포장율 52.4%) - ‘12년말 기준

□ 추진실적

◦ 용평~다산┎ 전체분 ‘08. 4월 공사 착공/ 2공구 L=1.1km 포장 완료

┖ 1공구 용지매입 추진/총 57필지 중 42필지 보상완료(80%)

◦ 장교~임리 : ‘07. 10월 공사 착공/ 장교~임리구간 L=4.0km 포장완료

◦ 대신~대신 : ‘08. 4월 공사 착공/ L=1.0km 포장 완료

◦ 방촌~택촌 : ‘05. 6월 실시설계완료/ 총 14필지 중 10필지 보상완료(71%)

◦ 송기~백평 : 용지매입추진 / 총 58필지 중 28필지 보상완료( 48%)

□ 추진계획

◦ 용평~다산 : ‘13. 1월 장기계속공사 발주/토공 및 구조물 시행

◦ 장교~임리 : ’13. 3월 공사착공/상반기 공사 완공

◦ 대신~대신 : ‘13. 3월 공사착공/토공 및 구조물공 시행

◦ 방촌~택촌 : ‘13. 1월 공사발주/연내 공사완료 목표 추진

◦ 송기~백평 : '13. 1월 장기계속공사 발주/토공 및 구조물 시행

농어촌도로 확․포장사업

□ 개    요

◦ 계      획 : 5개노선/8.25km/10,950백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 5개노선/8.25km/ 4,746백만원

- 사업기간 : 2007 ~ 2015(9개년)

◦ 2013 시행 : 5개노선 / 8.25km / 1,744백만원

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
				계	기투자	2013	2013이후
계		5개노선	8.25	10,950	4,746	1,744	4,460	59
계속 사업	배촌선	주천면	1.65	3,200	3,064	136	-	100	‘07~’13
	송입선	대강면	1.67	2,150	990	500	660	69	‘09~’14
	식련선	산동면	0.93	1,200	492	708	-	100	‘12~’13
	영촌선	주생면	1.80	1,800	85	200	1,515	16	‘13~’15
	산성선	대산면	2.20	2,600	115	200	2,285	12	‘13~’15

※ 총 계획 : 331개노선/635.8km 중 175.2km완료(포장율 27.5%) - ‘12년말 기준

□ 추진실적

◦ 배 촌 선 : ‘07. 10월 공사 착공/전체구간 포장완료

◦ 송 입 선 : ‘09. 3월 공사 착공/1공구 L=0.4km 공사완료

◦ 식 련 선 : ’12. 6월 공사착공/토공 및 구조물 시행

◦ 영 촌 선 : ‘10. 7월 실시설계완료

◦ 산 성 선 : ‘10. 8월 실시설계완료

□ 추진계획

◦ 배 촌 선 : ‘13. 3월 공사착공/부대공사시행

◦ 송 입 선 : ‘13. 3월 공사착공/토공 및 구조물 시행

◦ 식 련 선 : ‘13. 3월 공사착공/연내공사 완료 추진

◦ 영 촌 선 : 용지매입추진/(102필지 16,936㎡)

◦ 산 성 선 : 용지매입추진/(30필지 16,428㎡)

통행불편 마을진입로 정비사업

□ 개    요

◦ 계      획 : 4개노선/2.00km/1,956백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 3개노선/1.8km/  590백만원

- 사업기간 : 2010 ~ 2013(4개년)

◦ 2013 시행 : 4개노선 / 2.0km /1,366백만원

사업명		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
				계	기투자	2013	2013이후
계		4개노선	2.0	1,956	590	1,366	0	100
계속 사업	용담진입로	주천면	0.5	950	340	610	-	100	‘10~13
	만동진입로	덕과면	0.8	176	50	126	-	100	‘12~13
	대율진입로	사매면	0.5	600	200	400	-	100	‘12~13
신규 사업	신양마을 도로정비	덕과면	0.2	230	-	230	-	100	‘13

□ 추진실적

◦ 용담진입로 : ‘12. 6월 공사착공/ 토공 및 구조물 시공완료(1차분)

◦ 만동진입로 : 전체구간 L=0.8km 중 L=0.4km 포장완료

◦ 대율진입로 : ‘12. 6월 공사착공/ 토공 및 구조물공 완료(1차분)

□ 추진계획

◦ 용담진입로 : ‘13. 3월 공사착공/11월 공사 완공 추진

◦ 만동진입로 : ‘13. 3월 공사착공/상반기 공사 완공 추진

◦ 대율진입로 : ‘13. 3월 공사착공/10월 공사완료 추진

◦ 신양마을 도로정비 : 실시설계 시행 및 연내 공사완료 목표 추진

북남원 나들목 진입도로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 대산면 운교리(시도 11호선) ~ 신정동(서부순환도로)/중로1-17호선

◦ 사 업 량 : L=3.5km, B=22.0m(4차로)

◦ 시업기간 : 2007 ~ 2016(10개년)

◦ 사 업 비 : 22,600백만원

※ 공사비 179억원, 용지비 37억원, 설계비 10억원

구 분	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
			계	기투자	2013	2013이후
계		3.5	22,600	6,350	1,450	14,800	34.5
도 시 계획구간	신 정 동	1.1	7,100	5,650	1,450	-	100	'11~'13
비도시 계획구간	대산 운교~ 대산 금성	2.4	15,500	700	-	14,800	4.5	'13~'16

□ 추진실적

◦ 도시계획구간 : ‘10. 11월 공사 착공/ 토공 및 구조물공 완공(1차분)

◦ 2차분 공사시행 : '12. 6월~8월/ 45억(기채 30억, 교부세 10억, 도비 5억)

- 기채 30억/'12. 12월 공사완공(추진공정 : 70%)

◦ 비도시계획구간 : 편입토지 분할측량 실시(‘12. 10. 26 ~ 11. 9)

□ 추진계획

◦ 도시구간(88고속도로～신정동(서부순환도로))

- 88고속도로 통과 구간(화정교) 2013년 7월경 교통전환 계획으로 교통전환 이후 도시구간 2013년 하반기 완공

◦ 비도시구간(북남원IC입구 ～ 88고속도로)

- 개발촉진지구로 지정 국비(160억)사업으로 추진

- 2013년 개발촉진지구지정 및 개발계획 변경 승인

하천 정비사업

□ 개    요

◦ 대상지역 : 남원시 관내 / 2개분야 6개소

◦ 사 업 비 : 52,835백만원(국비 60%, 도비 20%, 시비 20%)

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2016 (11개년)

◦ 사업계획

사업명		읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				사업 기간
				계	기투자	2013	2013이후
합 계		6개소	29.21	52,835	26,920	12,554	13,371
	1. 지방하천	5개소	26.06	49,785	26,920	12,027	10,848
	운교천	대산운교	2.4	5,529	2,370	1,800	1,359	‘11~’14
	요 천	이백/산동면	10.0	17,934	12,091	2,916	2,937	‘06~’14
	풍 천	아영인풍	6.4	16,802	11,625	5,177	-	‘06~’14
	갈치천	갈치식정	3.9	4,913	834	1,634	2,445	‘12~’14
	주촌천	주천주천	3.36	4,607	-	500	4,107	‘13~’16
	2. 소 하 천	1개소	3.15	527	-	527	-
	신 동 천	보절신파	3.15	3,050	-	527	2,523	‘13~’14

□ 추진실적

◦ 운교천/요천5지구/풍천2공구/ L= 3.6km 사업 완료

◦ 갈치천/ 계약심사사 의뢰(‘12. 12. 11) 완료 ⇒ 전라북도

□ 추진계획

◦ 갈치천 : ‘13. 1월 사업 발주

◦ 주촌천 : ‘13. 1월 실시설계 발주/6월 사업 발주 추진

◦ 신동천 : ‘13. 1월 실시설계 발주/5월 사업 발주 추진

◦  6개소 : ‘13. 12월 공사완공목표 추진

람천 고향의 강  정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 행정리(엄계교) ~ 운봉읍 신기리 (국악의 성지 앞)

◦ 사  업  량 : 고향의 강 조성  L= 5.3km

- 보축 5개지구 L= 5.6km, 가동보 4개소, 교량 1개소, 어도 4개소

◦ 사 업 비 : 21,122백만원 (국비60%, 도비20%, 시비20%)

⇒ 2012년사업 1,133백만원

◦ 사업기간 : 2011. 11 ~ 2016. 12 (5년간)

지구명	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
			계	기투자	2012	2012이후
람 천	운봉읍	5.3	21,122	533	1,133	19,456	7.9	‘11~’16

□ 추진실적

◦ 실시설계 및 기본계획(변경) 용역 착수 : ‘11. 11. 30

- 과업중지 ’12.8.28(전북도 기본계획심의 및 지방건설기술심의에 따른 과업중지 중)

◦ 설계 자문위원 위촉 (16명) : ‘12. 3. 18

- 관계공무원 관련전문가 9명, 지역 주민 및 단체 7명

◦ 설계 자문위원 개최/ 용역 주민설명회 개최(‘12.6.12/6.20)

◦ 하천기본계획 변경 심의 (전라북도) : ‘12. 10. 5

◦ 지방건설기술심의 상정 : ‘12. 12. 7

□ 추진계획

◦ 지방건설기술심의 완료 후 사업 발주 : ’13. 1월

◦ 용지 보상 : ‘13. 2월 ~ 4월

◦ 공사 착공 : ‘13. 3월

◦ 공사 완공 : ‘13. 12월

광치천 생태하천 복원사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동 ~ 용정동 용정교 (광치천/ 지방하천)

◦ 사 업 량 : 하천유지수 확보 및 수질개선 L= 1.2km

◦ 사 업 비 : 180억원 [국비 108 (60%), 지방비 72 (40%)]

◦ 사업기간 : 2013 ～ 2015(3년간)

◦ 사업내용 : 생태인공습지(3,500㎡), 창포 등 수생식물(2,000㎡),

가동보 등 유지수 조절시설(3개소), 수질정화시설

물순환 장치, 미생물 등

지구명	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업 기간
			계	기투자	2013	2013이후
광치천	향교/용정동	1.2	18,000	-	3,333	14,667	18.5	‘13~’15

□ 추진계획

◦ 계약심사 후 용역발주 : ‘13. 1월

◦ 지방건설기술심의 상정 : ‘13. 9월

◦ 사업 발주 : ‘13. 10월

◦ 용지 보상 : ‘13. 10월 ~

□ 기대효과

◦ 광치천 생태하천 복원사업의 극대화로 시민의 삶의 질 향상에 기여

◦ 하천 친수공간 확대로 여가활동 공간의장 마련 및 하천문화 창달에 기여

- 광치천 산책로 (저전거도로)와 친수공간 연계로 사업효과 극대화 도모

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 하천 유지관리사업 총계획 : 3개사업  L= 339.4km

◦ 사 업 비 : 1,776백만원(국비 : 1,400, 도비 : 60, 시비 : 316)

◦ 사업계획

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	사업기간	재 원
계	3개사업	339.4	1,776
소하천 유지관리사업	23개 읍면동소하천 349개소 L= 392.1km 중 20km	20.0	256	’13	시비 100%
하천기성제 정비성사업	국가하천 2개소 L= 36.2km 지방하천 40개소 L= 247.0km	283.2	120	’13	도비50% 시비50%
국가하천 유지보수사업	국가하천(섬진강,요천) 2개소 L= 36.2km	36.2	1,400	’13	국비 100%

◦ 사업 내용

- 소하천 유지관리사업 : 하상준설, 하천시설물, 제방 유지보수

- 하천기성제 정비사업 : 제초작업 및 수목제거, 수문정비, 제방요철 정비 등

- 국가하천 유지보수사업 : 호안정비, 수문정비, 수목제거, 제방유지보수 등

□ 추진계획

◦ 하천유지관리 대상지 조사 : ’13.1월 ~ 2월

◦ 유지관리사업추진(소하천,지방하천) : 2013. 2월 ~ 11월

◦ 국가하천 유지관리사업 : 2013. 3월 ~ 11월

□ 기대효과

◦ 시설물정비, 수목제거, 기성제 관리로 사전재해예방 도모

소규모 주민숙원사업

□ 개  요

◦ 위    치 : 23개 읍․면․동

◦ 사업내용 : 마을진입로, 안길, 농로, 하수구, 마을회관, 모정 등 소규모시설

- 사 업 량 : 420개소

- 사 업 비 : 6,682백만원

◦ 사업기간 : 2013년 2월 ～ 2013. 12월

(단위 : 개소/백만원)

사업구분	계		시설비		민간자본		비 고
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
합 계	420	6,682	324	5,487	96	1,195
주민숙원사업	218	4,369	178	3,637	40	732
주민편익증진사업	94	953	38	490	56	463	도비사업 포 함
유지관리사업	3	310	3	310	-	-
면 자체사업	105	1,050	105	1,050	-	-	재량사업

※ 읍․면․동 자체사업중 2개읍면(운봉읍, 주천면)은 자체적으로 사업추진

□ 추진계획

◦ 지역경제 활성화를 위해 사업 조기발주 추진

- 현지조사 및 측량     : 252개소, 4,009백만원 (60%)

- 상반기 조기발주 시행 : 252개소, 4,009백만원 (60%)

□ 기대효과

◦ 상반기 60%이상 조기발주로 지역경제 활성화에 도모

◦ 시민들의 생활환경 개선 및 지역경제 활성화 기여

◦ 주민 생활과 밀접한 소규모시설사업으로 주민수혜도와 투자효과가 높음

수해 복구사업

□ 개  요

◦ 피해기간 : 2012년 8월 25일 ~ 2012년 8월 30일(태풍 : 볼라벤, 덴빈)

◦ 피 해 액 :  975백만원 / 21건

◦ 복구금액 : 2,696백만원 / 21건

◦ 사업기간 : 2012년 9월 ～ 2013. 6월

구 분	건 수	사업비(백만원)				비 고
		합계	국비	도비	시비
합 계	21건	2,696	1,173	717.5	805.5
도 로	1건	669	335	167	167
하 천	15건	1,764	838	419	507
소 규 모	5건	263		131.5	131.5

□ 추진실적

◦ 피해조사 및 복구계획 확정                  : ’12. 9.  1 ~ 9. 10.

◦ 국․도비 및 특별교부세 교부                : ’12. 9. 25. ~ 10. 22.

◦ 국․도비 및 특별교부세 성립전 사용승인     : ’12. 10. 12. ~ 10. 25.

◦ 실시설계완료                               : ’12. 10. 8. ~ 11. 16.

◦ 공사발주 21개소 완료                                : ’12. 12월

◦ 소규모 수해복구 2개소 준공                  : ’12. 12. 18

□ 추진계획

◦ 공사 착공 : ‘13. 2월

◦ 공사 완공 : 우기 전 공사완공 추진(‘13. 6월)

2013년도 유관기관 투자사업 계획

기관명	사 업 명	사업량 (km)	사 업 비 (억원)					비고 (사업 기간)
			총 사업비	기투자	‘12 투자	‘13 예산 확보현황 (예정액)	이 후 투 자
계	11개사업	160.50	13,534	4,615	1,759	2,139	5,021
한 국 도 로 공 사	소계(1개사업)	75.87	10,245	2,958	1,188	1,800	4,299
	88고속도로 (담양~함양)확장	75.87	10,245	2,958	1,188	1,800	4,299	‘06~ ‘15년
익 산 지 방 국 토 관리청	소계(7개사업)	59.74	3,133	1,590	490	331	722
	남원 ~ 곡성 도로 건설공사	12.02	1,403	855	201	175	172	‘05~ ‘13년
	옥과 ~ 적성 도로 확장공사	8.28	398	144	50	55	149	‘09~ ‘17년
	오수 ~ 월락 도로확장공사	11.52	687	161	50	75	401	‘07~ ‘16년
	섬진강수계치수 수지제 개수공사	10.50	231	190	41	-	-	‘05~ ‘12년
	요천 창산제 외 4개소 보강공사	16.70	266	175	91	-	-	‘09~ ‘12년
	요 천 교 재가설공사	0.17	83	31	37	15	-	‘11~ ‘13년
	운봉교 통수 단면 개선공사	0.55	65	34	20	11	-	‘09~ ‘12년
전 라 북 도	소계(3개사업)	24.89	156	67	81	8	-
	섬진강살리기 사업 3-2공구	22.70	129	60	69	-	-	‘10~ ’12년
	위험도로개선공사 (지745-대산대곡)	1.56	15	7	8	-	-	‘11~ ‘12년
	위험도로개선공사 (국지60-산내매동)	0.63	12	-	4	8		‘12~ ‘13년