2014. 10

주요업무 추진실적

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2014년 주요업무 결산

□ 2014년 주요업무 추진실적

◦ 도로 유지관리사업

◦ 읍면지역 시도 확‧포장사업

◦ 농어촌도로 확‧포장사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 람천 고향의 강 정비사업

◦ 광치천 생태하천 복원사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 소하천정비 종합계획 재수립

◦ 하천 유지관리사업

일  반  현  황

□ 기    구

												건설과장
												이 남 준
건설행정담당										도 로 담 당															하 천 담 당
최 성 연										강 병 훈															박 영 재
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속										읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지관리사업															치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구분	계	일 반 직						공 무 직
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	소계	청원 경찰	도 로 보수원	용지 보상
정원	40	20	1	3	6	4	6	20	7	12	1
현원	37	18	1	4	9	3	1	19	7	11	1
증감	△3	△2	-	1	3	△1	△5	△1	-	△1	-

□ 도로 현황

(2013.12.31. 기준 / 단위 : km)

도로별	노선수	총연장	포 장	포장률(%)	비 고
계	839	1,367	724.5	53.0
고 속 국 도	2	69.7	69.7	100.0
국 도	5	125.3	125.3	100.0
국가지원지방도	2	47.7	47.7	100.0	전북 96.6%
지 방 도	7	120.2	107.0	89.0	전북 78.6%
시 도	472	174.4	93.9	53.8	전북 67.2%
읍 면 시 도	20	193.9	103.7	53.5	전북 55.2%
농 어 촌 도	331	635.8	177.2	27.8	전북 33.4%

□ 하천 현황

(2013.12.31. 기준 / 단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	42	285.8	432.9	349.3	83.7	80.68
국가하천	2	39.1	40.1	40.1	-	100.0
지 방 하 천	40	246.7	392.8	309.2	83.7	78.72	전북 78.7%

□ 소하천 현황

(2013.12.31. 기준 / 단위 : km)

총개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
		계	개 수	미개수
349	392.1	690.1	449.3	240.8	65.1	전북 35.8%

2014년 주요업무 결산

	주 요 성 과
북남원 나들목 진입도로 개설공사(화정~신정구간) 완공 - 사업내용 : L=1.1km, B=20.0m - 사업기간 : 2011. 11. 28 ~ 2014. 6. 25 - 사 업 비 : 74억원 88고속국도 교룡산성 연결통로 설치 사업비 국비확보 / 21억 7천 - 사업내용 : 생태통로 L=50m - 사업기간 : 2014 ~ 2015 - 사 업 비 : 21.7억원 / 14. 3. 13 백공산 4가 종단선형 개선 / 오수~월락 간 설계반영 시행 - 위 치 : 남원시 향교동(백공산4가) ~ 용정동(광한루주유소) - 사업내용 : 종단선형 개선 L=400m(S=7.9% ⇒ S≒4.0%) 2014 국가예산 추가 확보 - 2개사업 / 23.5억원(국비 14.6억 도비 8.9억) - 반선지구 보도설치사업 : 도비 4억원 - 지방하천 정비사업(갈치천) : 19.5억원(국비 14.6억, 도비 4.9억) 88고속국도 동남원IC 진출입도로 개설 사업비 국비확보 추진중 - 사업내용 : 진출입도로 L=1.2㎞ - 사업기간 : 2015 ~ 2016 - 사 업 비 : 33억원(국비 12, 도로공사 18, 시비 3) 주천면 호경교 도로확장공사 사업비 국비확보 추진중 - 사업내용 : 도로확장 L=240m(4차로, 교량 1개소) - 사업기간 : 2015 ~ 2016 - 사 업 비 : 43억원(국비 43) 대강면 방동마을 앞 평면교차로를 교량으로 변경시행 추진 - 위 치 : 대강면 방동마을 앞(옥과~적성간 도로확장공사 구간) - 사업내용 : 평면교차로→교량(폭 15m) - 사 업 비 : 15억원

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 - 6개분야/139개소/997백만원

<138개소 완공>                - 추진공정 95%

◦ 도로 유지관리사업              : 42개소 / 327백만원

◦ 교량 유지관리사업              :  4개소 /  82백만원

◦ 시특법 교량 정밀점검           :  3개소 /  50백만원

◦ 안전시설물 정비                : 26개소 /  45백만원

◦ 도로표지판 정비                : 13개소 /  17백만원

◦ 과속방지턱 시설개선            : 50개소 /  45백만원

◦ 반선지구 보도 설치공사(시행중)  :  1개소 / 400백만원

□ 지역 균형발전을 위한 도로 개설   -  8개노선/4,458백만원

(시비 4,458백만원)

<8개노선 중 1개노선 완공>     - 추진공정 55%

◦ 읍면지역시도 확․포장사업 4개노선 / 4개노선 공사 중(L=8.70km/2,900백만원)

◦ 농어촌도로 확․포장사업 4개노선 / 1개노선 완공(L=5.12km/1,558백만원)

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 - 10개지구/13,767백만원

(국비 7,873  도비 1,452  시비 4,442)  - 추진공정 70%

◦ 하천 정비사업(지방하천, 소하천)     :  7개소 / 6,574백만원

◦ 람천 고향의 강 조성사업        :  1개소 / 2,667백만원

◦ 광치천 생태하천 복원사업       :  1개소 / 3,131백만원

◦ 하천 유지관리사업              :  1식   / 1,395백만원

	아쉬운 점
◦ 도로개설 사업시 장기화로 인한 통행불편 등의 주민 민원 사항이 다수 발생하므로 계획공기 내 공사를 완료할 수 있도록 노선별 집중투자 필요 ◦ 하천정비사업의 행정절차 이행에 따른 공사지연으로 공정률 저조 - 갈치천, 주촌천, 풍천, 장교소하천 정비사업

2014년 주요업무 추진실적

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 사업개요 : 6개분야 / 997백만원(도비 400, 시비 597)

사 업 명	사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계	6개분야		997
도로유지관리보수	관내 관리도로	1식	342	시비 100%
교량유지관리보수	〃	1식	100	〃
시특법 교량 정밀점검	〃	1식	70	〃
안전시설물 정비	〃	1식	45	〃
도로표지판 정비	〃	1식	40	〃
반선지구 보도설치	산내 부운 반선	보도설치	400	도비

□ 추진실적 (공정률 95%)

◦ 도로 유지관리사업 완료           : 42개소  / 327백만원

◦ 교량 유지관리사업 완료           :  4개소  /  82백만원

◦「시특법」대상교량 정밀점검 완료  :  3개소  /  50백만원

◦ 안전시설물 정비 완료             : 26개소  /  45백만원

◦ 도로표지판 정비 완료             : 13개소  /  17백만원

◦ 과속방지턱 시설개선(동지역) 완료  : 50개소  /  45백만원

◦ 반선지구 보도 설치공사 시행 중   :  1개소  / 400백만원

□ 금후계획

◦ 반선지구 보도 설치공사   : 2014. 8. 29 ~ 11. 14

◦ 도로 및 시설물 유지관리  : 응급복구 발생시 신속 복구 추진

읍면지역 시도 확․포장사업

□ 사업개요

◦ 계     획 : 4개노선 / 8.70km / 16,321백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 4개노선 / 8.70km /  7,594백만원(투자율 47%)

- 사업기간 : 2007 ~ 2017년(11개년)

◦ 2014 시행 : 4개노선 / 8.70km / 2,900백만원

◦ 사업계획

사 업 명		읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				전 체 공정률 (%)	사업 기간
				계	기투자	2014	2014이후
합 계		4개노선	8.70	16,321	7,594	2,900	5,827	56
계속 사업	용평~다산	보절면	1.80	3,414	1,214	1,000	1,200	60	‘12 ~‘15
	대신~대신	사매면	3.58	6,157	4,797	800	560	90	‘07 ~‘15
	송기~백평	송동면	1.12	2,650	1,390	1,000	260	65	‘11 ~‘15
	임리~매요	운봉읍	2.20	4,100	193	100	3,807	7	‘14 ~‘17

※ 총 계획 : 20개노선 / 193.9km 중 104.0km완료(포장률 53.6%, 전북 53.3%)

□ 추진실적 (공정률 60%)

◦ 용평~다산 : 배수공 및 구조물공 시공중 / 공정률 70%

◦ 대신~대신 : 아스콘포장 완료(금차분 완료) / 공정률 100%

◦ 송기~백평 : 토공 및 구조물공 시공중 / 공정률 60%

◦ 임리~매요 : 실시설계 보완 용역중

□ 금후계획

◦ 용평~다산 : 배수공 및 구조물공 추진 / ‘14년 시행분 11월 완공

◦ 송기~백평 : 측구공, 포장공 일부 추진 / ‘14년 시행분 12월 완공

◦ 임리~매요 : 실시설계 보완 용역 완료

농어촌도로 확․포장사업

□ 사업개요

◦ 계     획 : 4개노선 / 4.92km / 7,443백만원(재원 : 시비 100%)

- 기 시 행 : 4개노선 / 4.92km / 2,670백만원(투자율 36%)

- 사업기간 : 2008 ~ 2016년(9개년)

◦ 2014 시행 : 4개노선 / 4.92km / 1,558백만원

◦ 사업계획

사업명		읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				전 체 공정률 (%)	사업 기간
				계	기투자	2014	2014이후
합 계		4개노선	4.92	7,443	2,670	1,558	3,215	54
계속 사업	신 촌 선	대산면	0.95	1,583	725	858	-	90	‘13 ~‘14
	송 입 선	대강면	1.67	2,160	1,660	500	-	100	‘08 ~‘14
	영 촌 선	주생면	1.80	2,700	285	100	2,315	14	‘10 ~‘16
신규	두 신 선	송동면	0.50	1,000	0	100	900	10	‘14 ~‘15

※ 총 계획 : 331개노선 / 635.8km 중 178.4km완료(포장률 28.1%, 전북 33.6%)

□ 추진실적 (공정률 50%)

◦ 신 촌 선 : 아스콘포장 시공중 / 공정률 95%

◦ 송 입 선 : 공사 완료 / 공정률 100%

◦ 영 촌 선 : 용지매입 추진 / 17,614.2㎡ 중 10,166.2㎡ 완료

◦ 두 신 선 : 실시설계 보완 완료 및 용지매입 추진

□ 금후계획

◦ 신 촌 선 : 10월말 전체완공

◦ 영 촌 선 : 실시설계 보완 용역 및 용지매입 추진

◦ 두 신 선 : 실시설계 보완 완료 및 용지매입 추진

지방하천 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 대산면 운교천 외 4개소

◦ 총 계 획 : 21개지구 / 93.13km / 186,164백만원

-‘14년사업 : 5개지구 / 29.51km / 4,690백만원(국비 2,556 도비 879 시비 1,255)

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2019년 (14개년)

◦ 사업계획

지구별		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				전 체 공정률 (%)	사업 기간
				계	기투자	2014	2015이후
합 계		5개하천	29.51	73,615	24,011	4,690	44,914	40
계속	운교천	대산면	2.4	5,529	5,399	130	-	100	‘11 ~‘14
	요 천	이백/산동면	10.0	17,933	15,946	1,153	834	90	‘06 ~‘15
	갈치천	갈치동	3.93	7,353	2,333	1,000	4,020	40	‘12 ~‘15
	주촌천	주천/어현동	3.36	4,607	333	1,607	2,667	10	‘13 ~‘17
신규	풍 천	아영/인월	9.82	38,193		800	37,393	5	‘14 ~‘19

※ `13년예산 명시이월 : 167백만원(시비)

□ 추진실적 (공정률 60%)

◦ 운교천 : ‘14. 4월 사업 완료 (공정 100%)

◦ 요  천 : 공사착공(5월) / 저수호안 및 구조물공사 시행 / 공정률 35%

◦ 갈치천 : 공사착공(4월) / 축제 및 구조물공사 시행 / 공정률 35%

◦ 주촌천 : 공사착공(3월) / 용지매입 추진 / 30,940㎡ 중 / 18,433㎡, 40%

◦ 풍  천 : 공사착공(3월) / 용지매입 추진 / 9,895.2㎡ 중 / 1,791.1㎡, 18%

□ 금후계획

◦ 2014년 시행사업 연내 완공 추진

- 요  천 : 저수호안 L= 3.0km

- 갈치천 : 축제 및 호안 L=1.8km

- 주촌천 : 교량 2개소 및 용지보상

- 풍  천 : 교량 1개소 및 취입보 1개소

람천 고향의 강 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 운봉읍 행정리(삼산교) ~ 운봉읍 화수리 (국악의 성지 앞)

◦ 사 업 량 : 고향의 강 조성 L=5.3km

- 보축 5개지구 L=5.6km, 교량 1개소, 어도 3개소

- 배수공 18개소, 배수암거 7개소, 낙차공개량(여울) 6개소

◦ 총사업비 : 21,122백만원(국 12,673(60%), 도 4,225(20%), 시 4,224(20%))

◦ 사업기간 : 2011 ∼ 2016년(6개년)

구 분	사업량(km)	사업비(백만원)				전 체 공정률 (%)	사업기간
		총사업비	기투자	2014	2015이후
합 계	5.30	21,122	5,644	2,667	12,811	45
화수지구	1.0	5,528	2,966	1,530	1,032	70	‘13 ~‘15
신기지구	2.38	8,412	2,678	1,137	4,597	30	‘13 ~‘16
행정지구	1.92	7,182	-	-	7,182	-	‘15 ~‘16

□ 추진실적 (공정률 95%)

◦ 화수지구 : 1차분, 2차분 준공 / 공정률 90%

- 사업량 : 호안정비 L=1.0km, 교량1개소

◦ 신기지구 : 1차분, 2차분, 3차분 준공 / 공정률 100%

- 사업량 : 호안 L=0.65km, 낙차공 4개소, 배수공 6개소

□ 금후계획

◦ 화수지구 : 화수교 상부 구조물공사 /‘14년 시행분 11월 완공

◦ 신기지구 : 현장 안전조치 및 `15년 시행분 준비

- 용지매입추진 / 183필지 48,816㎡중 67필지 21,501㎡ 44%완료

◦ 행정지구 : `15년 사업 발주 준비

광치천 생태하천 복원사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 향교동 ~ 용정동 지내 (광치천/ 지방하천)

◦ 사 업 량 : 하천유지수 확보 및 수질개선 L=2.3km

- 생태호안정비 L= 4.1㎞, 향교보 개량 1개소, 어도 1개소

- 목교 1개소, 교량재가설 2개소, 배수암거 2개소

◦ 사업기간 : 2013 ∼ 2015년(3개년)

◦ 총사업비 : 18,000백만원(국 10,800(60%), 시 7,200(40%))

구 분	총사업비	2013	2014	2015이후	비 고
합 계	18,000	3,536	3,131	11,333
국 비	10,800	2,500	1,500	6,800
시 비	7,200	1,036	1,631	4,533

※ `13년 예산 명시이월 : 2,540백만원(국비 1,506백만원  시비 1,034백만원)

□ 추진실적

◦ 하천기본계획(변경) 심의 완료(전북도)            :‘14. 4. 3

◦ 기본 및 실시설계 사업내용 변경신청(환경청) / 승인 :‘14. 6. 30 ~ 7. 21

- 사업량 L=1.2km ⇒ L=2.3km, 신생마을 171동 철거

◦ 실시설계(안) 기술검토 협의 완료(환경청, 환경관리공단)  :‘14. 8. 1

◦ 생태하천복원(심의위원회) 심의 의뢰(전라북도)   :‘14. 8. 13

◦ 소규모 환경영향평가 협의 요청(환경청)         :‘14. 8. 27

◦ 석면조사 용역(신생마을철거 41개소) 발주 의뢰  :‘14. 9. 5

◦ 생태하천복원(심의위원회) 심의 완료(전라북도)   :‘14. 9. 11

□ 금후계획

◦ 최종 사업계획 변경 협의(환경청)               : `14. 10.

- 사업량 : L=2.3km, 사업비 18,000백만원

◦ 계약심사 의뢰(도 예산과)                      : `14. 10.

◦ 사업 발주 및 착공                            : `14. 10. ~ 11.

소하천 정비사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 보절면 신동천 외 1개소

◦ 사 업 비 : 6,091백만원(국비 50%, 시비 50%)

- ‘14년사업 : 2개지구 / 3.2km / 1,884백만원(국비 942  시비 942)

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2017년 (5개년)

◦ 사업계획

지구별		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				전 체 공정률 (%)	사업 기간
				계	기투자	2014	2015이후
합 계		2개하천	4.6	6,091	527	1,884	3,680	30
계속	신동천	보절신파	3.15	3,050	527	1,200	1,323	40	‘13 ~‘15
신규	장교천	운봉장교	1.45	3,041		684	2,357	5	‘14 ~‘17

※ `13년 예산 명시이월 : 471백만원(특별교부세)

□ 추진실적 (공정률 60%)

◦ 신동천

-‘13년 축제 및 호안 L= 0.7km(취입보 1개소)  `13년 9월 사업 완료

-‘14년 공사착공(5월) / 용지보상 및 구조물공사 시행 / 공정률 60%

◦ 장교천 : 실시설계 용역 추진

- 실시설계용역 착수                         : `13. 11. 15 ~

- 소규모 환경영향평가 협의(새만금지방환경청) : `14. 7.

- 계약심사 의뢰(도 예산과)                   : `14. 9. 29

□ 금후계획

◦ 신동천 : 보축 및 호안공 L=1.4km /‘14년 시행분 12월 완공

◦ 장교천 : 사업 발주 및 착공                   :‘14. 10.

소하천정비 종합계획 재수립

□ 사업개요

◦ 필 요 성

- 소하천정비법 제6조 1항에 따라 10년마다 재수립에 의거 소하천          정비사업 예산(국비) 지원

- 남원시 소하천정비 종합계획 수립 : 2003년도(10년경과)

◦ 용역대상 : 349개소 / L=392.1㎞를 2개 권역으로 분할 용역 발주 추진

- 요천권역 / 170개소(L=183.1㎞)

- 섬진강·낙동강 권역 / 179개소(L=209.0㎞)

◦ 용 역 비 : 6,600백만원(시비)

◦ 용역기간 : 2014 ~ 2018년(5개년)

권 역 별	사업량	총사업비	기투자	2014	2015	2016이후	용역기간
합 계	349개소/ L=392.1㎞	6,600	-	300	500	5,800
요천권역	170개소/ L=183.1㎞	3,100	-	300	500	2,300	‘14 ~‘17
섬진강 · 낙동강권역	179개소/ 209.0㎞	3,500				3,500	‘16 ~‘18

□ 추진실적

◦ 소하천정비사업 종합계획 재수립 용역 추진계획 수립

□ 금후계획

◦ `14년 예산(300백만원) 명시이월 추진 /‘15년 발주예정

하천 유지관리사업

□ 사업개요

◦ 계    획 : 3개사업 / L= 35.4km / 1,395백만원

◦ 사 업 비 : 1,395백만원(국비 896, 도비 40, 시비 459)

◦ 사업계획

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	공정률 (%)	비고
합 계	3개사업 / 39개소	35.4	1,395	90
소하천 유지관리사업	23개 읍면동소하천 349개소 L= 392.1km	15.8	257(시비)	90
	풍천, 삼화천(2개소) L=0.2km	0.2	125(시비)	100
하천기성제 정비사업	지방하천 40개소 L=247.0km	13.4	117 (도비 40, 시비 77)	80
국가하천 유지보수사업	국가하천(섬진강,요천) 2개소 L=39.1km 중 6.0km	6.0	896(국비)	80

◦ 사업 내용

- 소하천 유지관리사업 : 하상준설 및 정비, 하천시설물 및 제방 유지보수

- 하천기성제 정비사업 : 제초작업 및 수목제거, 수문정비, 제방요철 정비 등

- 국가하천 유지보수사업 : 제방 유지보수, 제초작업 및 수목제거, 수문정비 등

□ 추진실적 (공정률 90%)

◦ 소하천 유지관리사업  : 하상정비 L= 15.8km 중 L= 14.3km 완료

- 풍천, 삼화천 정비공사 L=0.2km 중 L=0.2km 완료

◦ 하천기성제 정비사업  : 제방정비 및 제초작업 L=13.4km 중 L=12.4km 완료

◦ 국가하천 유지보수사업  : 제방정비 및 제초작업 L=6.0km 중 L=5.0km 완료

□ 금후계획

◦ 소하천 유지관리사업  : 호안정비 L= 1.5km  12월 중 공사완료 추진

◦ 하천기성제 정비사업  : 제방정비(제초작업) L= 1.0km 12월 중 공사완료 추진

◦ 국가하천 유지보수사업  : 고수부지 및 호안정비 L=1.0km 12월 중 공사완료 추진

2015년 신규 투자사업

산성선 농어촌도로 확․포장사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 대산면 옥율리 ~ 내척동

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2018(9년)

◦ 사 업 량 : 도로 확․포장 L=2.8km, B=7.0m

◦ 총사업비 : 3,500백만원(시비 3,500)

◦ 지원근거 : 농어촌도로정비법

□ 추진계획

◦ 실시설계용역               : 2015. 2월 ~ 6월

◦ 용지보상 추진              : 2015. 7월 부터

□ 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	향후투자
합 계	3,500	115	100	1,000	1,000	1,285	0
국고(특교)	0
광특보조	0
기금보조	0
도비보조	0
시 비	3,500	115	100	1,000	1,000	1,285
지방채	0
채무부담	0
민자 등	0

□ 기대효과

◦ 낙후지역 개발로 지역균형 발전

◦ 면지역 도로망 확충 및 농산물 유통 원활

청계선 농어촌도로 확․포장사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 청계리 청계마을 ~ 고인마을

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2017(3년)

◦ 사 업 량 : 도로 확․포장 L=1.0km, B=7.0m

◦ 총사업비 : 1,800백만원(시비 1,800)

◦ 지원근거 : 농어촌도로정비법

□ 추진계획

◦ 실시설계용역               : 2015. 2월 ~ 6월

□ 재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	향후투자
합 계	1,800	0	100	800	900	0	0
국고(특교)	0
광특보조	0
기금보조	0
도비보조	0
시 비	1,800		100	800	900
지방채	0
채무부담	0
민자 등	0

□ 기대효과

◦ 낙후지역 개발로 지역균형 발전

◦ 면지역 도로망 확충 및 농산물 유통 원활