2018. 7.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

5분발언 추진상황

축   산   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 한우육성사업

◦ 낙농육성사업

◦ 고품질축산물 생산지원

◦ 가금(닭‧오리) 육성사업

◦ 기타가축 육성사업

◦ 내수면 어업 육성사업

◦ 조사료 생산․이용 활성화

◦ 가축분뇨 퇴·액비 자원화

◦ 가축 악성질병 근절

◦ 가축 상시방역체계 구축

◦ 친환경농업 경쟁력 강화

◦ 친환경농산물 학교급식 공급기반 확대

◦ 친환경농업 실천기반 확대육성

□ 5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

									축 산 과 장
									형 진 우
축산행정담당							축산지원담당									가축방역담당											친환경농업담당
방 묘 원							서 형 진									이 화 성											공 대 현
◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	축산정책기획 대가축육성 중소가축육성 기타가축육성 내수면어업관리 FTA대책추진 축산업허가제 축산재해관리						◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	축산지원정책기획 조사료생산지원 부존자원사료화 초지조성관리 가축분뇨처리시설 축산환경개선 가축분뇨공동자원화 가축분뇨액비화지원 축사현대화, ICT 등								◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦		축산식품위생관리 가축방역 축산식품인․허가 부정축산물단속 친환경 축산물 인증 동물병원및공수의관리 축산물가공시설지원 축산전문판매장 설치									◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	친환경농업육성 친환경직불제 친환경농자재지원 친환경농업지구조성 토양개량제공급 GAP인증확대 유기질비료지원 학교급식지원

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	4	4	6	1
현 원	17	1	5	7	1	3	휴직 1
증 감	1	-	1	3	△5	2

□ 축산현황

◦ 주요가축 사육현황                             (2017년 12월말 기준)

축 종		축산농가(호)		전북 사육두수 (전북 비율)	비 고
		사육농가	사육두수
계		1,596
한․육우		921	34,376두	359,109두(9.5%)
젖소		42	3,021두	33,105두(9.1%)
돼지		69	114,035두	1,342,634두(8.5%)
염소․사슴		155	8,782두	66,714두(13.1%)
닭		141	9,285천수	28,226천수(32.9%)
오리		46	841천수	2,012천수(41.8%)
말		4	61두	1,295두(4.7%)
꿀벌	한 봉	20	448군	13,323군(3.4%)
	양 봉	157	25,250군	212,961군(11.9%)

□ 조사료 생산기반

◦ 초지 343㏊, 사료작물재배 1,550㏊, 섬유질 배합사료공장 1개소

□ 축산관련 시설

◦ 축산물작업장 : 2개소(제일푸드, 코리아더커드-휴업중)

- 도축장 : 8,660㎡(소 160, 돼지 800두/일), 도압장 : 22,895㎡(50,000수/일)

◦ 가축시장 : 1개소/부지 9,910㎡(건물 1,937㎡), 계류시설 큰소 200두(송아지 400두)

◦ 동물병원 : 12개소/동물약국 7개소

◦ 축산물 가공․유통․판매업 : 248개소

- 식육 161, 우유 19, 식육포장 16, 부산물 3, 식용란 7, 유통전문 26, 즉석판매가공업 16

◦ 가축분뇨처리시설 : 154개소

- 공동자원화시설 1개소, 액비유통센터 3개소, 축분처리시설(`10년 이후) 150개소

□ 친환경 인증 및 농산물 생산현황

◦ 농가/면적 : 318호/386ha(유기 158, 무농약 228)

◦ 작물별 : 쌀 292㏊, 채소 54㏊, 과수 28㏊, 과채류 5ha, 기타 8ha

□ GAP 인증농산물 생산현황

◦ GAP 인증농가/면적 : 1,087호/954㏊(`18년 6월 현재)

※ GAP이상 인증면적 : 1,340ha(친환경 386, GAP 954) * 경지면적의 8.6%

2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 구제역·AI등 악성 가축전염병 차단, 청정 남원축산 구현 ◦ 친환경농업 경쟁력 강화 공모사업 및 국비예산 추가확보 : 2개사업 627백만원 - 친환경퇴비생산시설 현대화사업 : 1개소/ 300백만원(국비60, 시비60, 융자90, 자담90) - 유기질비료 지원사업 국비예산 추가확보 : 1개사업/327백만원(국비) ◦ 2018년 한우축산시설·장비현대화사업 지원 생산성 향상 : 2,891백만원 ◦ 쇠죽한우 육성(시장공약사업) 목표달성 : 2,077두/ 21농가육성 ◦ 서울 등 대도시 친환경농산물 학교급식 확대로 유통·소비 활성화 - 서울 등 대도시 : 25개구/461톤/1,504백만원 매출 - 시내권 고등학교 무상급식 전면실시 : 7개교(1,800명)/1,128백만원

□ 가축질병 예방 및 방역추진

◦ 구제역·AI 차단으로 청정 남원축산 구현

- 가축방역대책본부 24시간운영 : 2017. 10. 1. ~ 2018. 5. 31일까지

- 거점소독시설 24시간 운영 : 2017. 11. 22. ~ 2018. 4. 30일까지

- 김포 구제역 발생에 따른 우제류 전체 일제접종 : 238,160두

· 접종 두수 : 소 35,360두, 돼지 192,800두, 염소 10,000두

◦ 인수공통 전염병인 소 브루셀라병 미 발생으로 청정화 추진(13년이후 미발생)

□ 사육환경 개선과 고품질  축산물 생산기반 확충 경쟁력 강화

◦ 대가축(한우, 젖소) 시설장비 현대화 추진으로 사육환경 개선 및 고급육 생산

◦ 중소가축(돼지, 염소) 축산기자재 등 기반사업 추진으로 경영안전 도모

◦ 가금류(오리, 닭) 환경개선 사업 등 추진으로 악취방제 및 폐사율 최소화

□ 가축분뇨의 자원화 및 조사료 생산기반 확충

◦ 가축분뇨의 적정처리로 주민 생활환경개선 및 자연순환농업 활성화

◦ 발효액비 살포전 사전 승인제 실시로 우량액비 공급 및 냄새민원 최소화

◦ 조사료 생산기반 확충, 양질의 풀사료 공급으로 소 사육농가 경쟁력 향상

□ 양봉농가 질병 차단을 위한 약품지원

◦ 봄철 분봉시기 노제마 및 응애류 예방약품 공급완료(15,832통)

◦ 최근 양봉 바이러스 질병발생에 따른 긴급 약품 지원

- 항생제 및 소독약품 400통 지원(전 농가 공급)

□ 친환경농업 실천기반 확대육성 및 학교급식 공급기반 확대

◦ 친환경육성 생산기반 확대지원 및 생산 초기 소득감소분 보전 참여면적 확대

- 친환경농업직접지불제 지원사업 등 9개분야 1,146백만원 사업추진

- 유기질비료, 토양개량제지원, 유통조직육성 등 5개분야 9,208백만원 사업추진

◦ 친환경농산물 학교급식 공급확대 판로망 구축 : 9개분야 4,869백만원

- 학교, 어린이집 공급 : 1,096개소(타시도 1,001, 전북도 18, 관내 77개소)

- 품목 135종, 공급량 675톤, 매출 2,015백만원(남농, 남원원예농협)

- 관내 친환경농산물 학교급식, 초중고등학교 무상급식, 학교급식 유정란 지원

◦ 친환경농산물 현장체험을 통한 소비자 신뢰도 제고와 소비촉진·판로망 구축

- 소비자 맞춤형 체험(800명), 대도시학교 친환경농업실천사업(16개교) 등 추진

◦ 농가의 친환경인증 편의성제고 및 GAP인증과 연계 도모로 소득안정 지원

- GAP인증농가 안전성검사비, 농산물우수관리 안전성분석비 지원 : 170백만원

□ 퇴비공장 악취저감 약품지원사업 추진

◦ 관내 퇴비공장 내 악취저감 약품을 지원하여 인근 주변 악취민원 해소

- 여름철 집중 악취민원 해소를 위한 악취저감 약품 공급 완료(7개소 37,160ℓ 지원)

	하반기 추진방향
◦ 고품질 축산물 품질향상 지원사업 강화를 통한 생산성 향상 도모 ◦ 축산 기반구축 사업으로 축산농가 경영안정화 도모 ◦ 가축분뇨 자원화와 조사료 생산기반 구축으로 축산 생산비 절감 ◦ 행정, 계열회사, 농가 합동으로 사전예방중심의 상시방역체계 구축 ◦ 친환경농산물 생산기반 확대 및 유통·소비 활성화 지속 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

한우육성사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 한우사육농가(921농가/34,376두)

◦ 사 업 량 : 한우축산시설․장비 현대화사업 등 11개사업

◦ 사 업 비 : 1,684백만원(보조 1,052, 자담 632)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비(백만원)						비고
		합계	보 조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	11개사업	1,674	1,042	44	91	907	632
한우축산시설/장비현대화사업	8개품목	660	330			330	330
면역력증강제지원사업	25,000㎏	100	50			50	50
한우인공수정정액지원사업	10,000두	100	100			100
음용수질개선장비지원사업	8식	80	48		14	34	32
암소유전형질개량사업	15,020두	150	90		30	60	60
고능력암소축군조성사업	1,083두	78	78		24	54
쇠고기이력제사업	9,203두	88	88	44	13	31
송아지생산안정사업	2,550두	51	26		8	18	25
한우광역브랜드명품화육성사업	70두	7	7		2	5
쇠죽한우육성기반지원사업	3종	234	117			117	117
쇠죽한우출하장려금지원사업	450두	126	108			108	18

□ 추진실적

◦ 한우축산시설 장비현대화사업 등 11개사업 : 공정 70%

- 한우축산시설 장비현대화사업(농후사료급이기 등 8개품목) 추진 : 공정 60%

- 면역력증강제지원사업(피드프리 등 6종) 추진 : 공정 100%

- 한우인공수정정액지원사업(인공수정정액대) 추진 : 공정 60%

- 음용수질개선장비지원사업(약품 투약식, 정수기 등) 추진 : 공정 10%

- 암소유전형질개량사업(등록사업, 선형심사) 추진 : 공정 60%

- 고능력암소축군조성사업(친자확인검사비, 관리비, 송아지장려금 등) 추진 : 공정 90%

- 쇠고기이력제사업(귀표부착비) 추진 : 공정 50%

- 송아지생산안정사업(생산안정제 가입비지원) 추진 : 공정 50%

- 한우광역브랜드명품화육성사업(암송아지 생산장려금) 추진 : 공정 20%

- 쇠죽한우육성기반지원사업(화식기, 급이기, 창고) 추진 : 공정 40%

- 쇠죽한우출하장려금지원사업 추진 : 공정 100%

□ 금후계획

◦ 사업 조기완공 및 보조금 지급 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 한우협회 업무협의 및 2019년 사업 수요조사 : 2018. 7 ~ 12월

낙농육성사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 젖소사육농가(42농가/3,021두)

◦ 사 업 량 : 학교우유급식사업 등 8개 사업

◦ 사 업 비 : 1,068백만원(보조 733, 자담 335)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비(백만원)						비고
		합계	보 조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	8개사업	1,068	733	254	51	428	335
젖소축산시설ㆍ장비현대화사업	3개품목	186	93			93	93
젖소인공수정정액지원사업	2,500st	25	25			25
젖소육성우위탁사업	164두/월	294	147			147	147
젖소검정사업	900두	18	18			18
착유시설세척제지원사업	1,460통	44	22		9	13	22
친환경우유생산기반구축사업	6개소	108	65	54		11	43
낙농헬퍼지원사업	2명	60	30		9	21	30
학교우유급식사업	3,269명	333	333	200	33	100

□ 추진실적

◦ 학교우유급식사업 등 4개 사업 등 11개사업 : 공정 73%

- 젖소축산시설ㆍ장비현대화사업(젖소관리시스템 외 2종) 추진 : 공정 60%

- 젖소인공수정정액지원사업(우량정액 지원) 추진 : 공정 100%

- 젖소육성우위탁사업(위탁 사육비용 지원) 추진 : 공정 50%

- 젖소검정사업(유성분 분석비 지원) 추진 : 공정 60%

- 착유시설세척제지원사업(세척제 지원) 추진 : 공정 100%

- 친환경우유생산기반구축사업(냉각기지원) 추진 : 공정 50%

- 낙농헬퍼지원사업(헬퍼지원) 추진 : 공정 60%

- 학교우유급식사업(우유급식지원) 추진 : 공정 60%

□ 금후계획

◦ 사업 조기완공 및 보조금 지급 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 낙우회 업무협의 및 2019년 사업 수요조사 : 2018. 7 ~ 12월

고품질축산물 생산지원

□ 개    요

◦ 사업대상 : 관내 축산농가(축산업허가·등록농가)

◦ 사 업 량 : 축산물품질향상 지원사업 등 3개 사업

◦ 사 업 비 : 170.2백만원(보조 89.9, 자담 80.3)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)						비고
		합계	보 조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	3개사업	170.2	89.9	8	30.8	51.1	80.3
축산물품질향상 지원사업	3식	66.2	33.1		13.2	19.9	33.1
축산기자재 지원사업	3식	88.0	44.0		17.6	26.4	44
축사화재안전시스템지원	4대	16.0	12.8	8		4.8	3.2

□ 추진실적

◦ 2018년 고품질 축산물 육성사업지원 등 3개사업 / 71백만원

- 축산물품질향상(음용수질개선제 등 3종) 추진 : 공정 80%

- 축산기자재(CCTV, 액체질소보관고) 추진 : 공정 60 %

- 축사화재안전시스템 추진 : 공정 30%

□ 금후계획

◦ 사업 조기완공 및 보조금 지급 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 낙우회 업무협의 및 2019년 사업 수요조사 : 2018. 7 ~ 12월

가금(닭‧오리) 육성사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 가금사육농가(닭 141호/9,285천수, 오리 46호/841천수)

◦ 사 업 량 : 가금축산시설‧장비 현대화사업 등 2개 사업

◦ 사 업 비 : 320백만원(보조 172, 자담 148)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)					비고
		합계	보 조			자담 (46%)
			소계 (54%)	도비 (7%)	시비 (47%)
합 계	2개사업	320	172	21.6	150.4	148
가금 축산시설‧장비 현대화사업	3개품목	200	100		100	100
폭염대비가축사육환경개선사업	2개품목	120	72	21.6	50.4	48

□ 추진실적

◦ 2018년 가금 축산시설‧장비 현대화사업 등 2개사업 : 공정 60%

- 가금 축산시설‧장비 현대화사업(3개 품목) : 공정 50%

· 고정식전자저울/5대 완료, 열풍기/139대 완료, 환기휀/대형 45대, 소형 65대 완료

- 폭염대비 가축사육환경 개선사업(2개 품목공정) : 공정 70%

· 자가발전기/5대 완료, 안개분무기/5개소 완료

□ 금후계획

◦ 사업 조기완공 및 보조금 지급 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 가금단체 업무협의 및 2019년 사업 수요조사 : 2018. 7 ~ 12월

기타가축 육성사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 기타가축 사육농가(꿀벌 177호/25,698군, 사슴 6호/138두, 흑염소 155호/8,782두)

◦ 사 업 량 : 꿀벌기자재 지원사업 등 6개사업

◦ 사 업 비 : 626백만원(보조 313, 자담 313)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)					비고
		합계	보 조			자담 (51%)
			소계 (49%)	도비 (7%)	시비 (42%)
합 계	6개사업	626	313	27.6	285.4	313
꿀벌기자재 지원사업	4개품목	310	155		155	155
고품질양봉기자재 지원사업(소초광)	3,446박스	148	74	22	52	74
양봉농가 꿀 생산장비 지원사업	9개소	27	13.5	4	9.5	13.5
흑염소기자재 지원사업	4개품목	80	40		40	40
흑염소 종모 지원사업	50두	50	25		25	25
사슴인공수정 지원사업	20두	11	5.5	1.6	3.9	5.5

□ 추진실적

◦ 2018년 꿀벌기자재 지원사업 등 6개사업

- 꿀벌기자재 지원사업(4개 품목) : 공정 80%

·양봉벌통 : 110농가/4,032개, 한봉벌통 : 1농가/1,200칸, 화분 : 127농가/881박스,              탈봉기 : 11농가/11대, 포장박스 : 96농가/1,248박스

- 고품질 양봉 기자재 지원사업[소초광(122농가/3,397박스)] : 공정 80%

- 흑염소 기자재 지원사업(4개품목) : 공정 90%

·환기휀 : 9농가/38대, 환기컨트롤 : 7농가/10대, 비타민 : 11농가/89통,           구충제 : 14농가/138통

- 사슴인공수정 지원사업[20두(1농가)] : 공정 50%

□ 금후계획

◦ 사업 조기완공 및 보조금 지급 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 축종별 단체 업무협의 및 2019년 사업 수요조사 : 2018. 7 ~ 12월

내수면 어업 육성사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 남원시 내수면어업계

◦ 사 업 량 : 자율관리어업 육성사업 등 3개사업

◦ 사 업 비 : 479백만원(보조 394, 자담 85)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)						비고
		합계	보조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	3개사업	479	394	277	32	85	85
자율관리어업 육성사업	120㎡	80	72	40	8	24	8
낚시터 환경개선사업	21ha	10	10	3		7
친환경에너지(히트펌프) 보급사업	1개소	389	312	234	24	54	77

- 자율관리어업 육성사업 : 위판장 및 사무실 신축(120㎡)

- 낚시터 환경개선사업 : 섬진강, 요천 자연발생 낚시터 환경정화

- 친환경에너지(히트펌프) 보급사업 : 에너지 절감시설(히트펌프) 지원

□ 추진실적

◦ 자율관리어업 육성사업 등 3개사업

- 자율관리어업 육성사업 : 건축 설계중

- 낚시터 환경개선사업 : 하천 정화활동 실시(4회)

- 친환경에너지(히트펌프) 보급사업 : 사업 시행업체 선정 중

□ 금후계획

◦ 보조금 교부결정 및 사업추진 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 사업장 관리 및 사후관리 : 2018. 7 ~ 12월

◦ 내수면 어업계와 업무협의 및 2019년 사업 수요조사 : 2018. 7 ~ 12월

조사료 생산·이용 활성화

□ 개    요

◦ 소 요 량 : 36,216두–연간 조사료 100천톤 필요(10kg/일)

◦ 2018년 계획 및 생산목표 28천톤 / 1,700ha

◦ 사 업 비 : 3,448백만원(보조 2,545, 융자 90, 자담 813)

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)							비고
		합계	보 조				융자	자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	8개사업	3,448	2,545	644	332	1,569	90	813
조사료사일리지제조비	25천톤	1,518	1,366	455	152	759		152
조사료용기계장비지원	2조	300	120	30	27	63	90	90
사료종자이용지원	150톤	510	363	159		204		147
조사료생산장려금	28천톤	170	170		51	119
자가사료배합기	8대	320	160		48	112		160
옥수수수확장비지원	1대	300	180		54	126		120
조사료기자재(곤포비닐)	2,400롤	240	96			96		144
조사료경작및옥수수장려금	600ha	90	90			90

□ 추진실적

◦ 8개 사업 : 완료 1개, 추진중 5개, 하반기 착수 2개, / 전체공정 65%

- 조사료재배추진 : 1,776ha(동계 1,466, 하계 310)

·동계 조사료 생산 추진 20천톤(결속작업 완료, 제조비 집행 중)

- 기계장비 : 3개 경영체 11대 구입완료(자금집행 중)

- 자가 사료배합기 : 완료 1대, 추진중 7대

- 옥수수 수확장비 1대 구입 완료(자금 집행 중)

- 조사료 기자재완료, 사료종자 봄 종자 31톤 완료(가을용 추진 중)

- 조사료생산장려금, 경작 및 옥수수장려금 : 2018. 7 ~ 11월 추진 예정

□ 쟁점 및 대책

◦ 조사료경영체(법인)의 사업의지 저하

(노력대비 낮은 생산량, 생산비용 증가, 기계장비 재 투자비 부담)

□ 종자비, 조사료기자재 지원으로 부담 완화, 하계작물 면적 확대

□ 금후계획

◦ 하계작물 재배생산 추진(면적확인, 수확작업 등) : 2018. 7 ~ 11월

◦‘19년 동계조사료 추진 : 2018. 10월 ~

가축분뇨 퇴·액비 자원화

□ 개    요

◦ 사업대상 : 개별축산농가, 법인체, 농·축협 등

◦ 사 업 비 : 1,874백만원(보조 1,064, 융자 161, 자담 649)

◦ 사업내용 : 가축분뇨퇴비화사업 등 10개 사업

◦ 사업내역

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비(백만원)							비고
		합계	보 조				융자	자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	10개사업	1,874	1,064	219	102	743	161	649
깨끗한축산농장조성(개별시설)	13개소	269	108	54	16	38	161
가축분뇨처리액비저장조사업	18기	250	176	50	38	88		74	신규 8기 개보수 10기
가축분뇨액비살포비지원	1,000㏊	200	200	100	30	70
액비부숙도(유해가스)측정장비지원	2종2대	31	31	15	5	11
환경친화적가축분뇨처리	10기	20	12		4	8		8
착유세정수정화처리시설지원	2개소	60	30		9	21		30
가축분뇨퇴액비자원화지원	3개사업	300	150			150		150
가축분뇨자동화처리장비지원	5대	150	60			60		90
가금류수분조절제왕겨보급	900대	252	126			126		126
가축분뇨처리수분조절제(톱밥등)	950대	342	171			171		171

□ 추진실적

◦ 10개사업 추진 : 추진중 10개사업 / 전체공정 60%

- 가축분뇨 퇴비화 : 고액분리기 7, 퇴비사 5개소 추진중/공정 60%

- 액비저장조(신규+개보수) : 신규 8기, 개보수 10기 추진중/공정 30%

- 액비살포비 : 살포면적 300㏊/공정 30%(벼 수확 후 중점 추진)

- 환경친화적 가축분뇨처리(슬러지제거) : 10기 추진중/공정 70%

- 가축분뇨 퇴액비자원화(탈취제, 발효제) : 2개사업 추진중/공정 60%

- 자동화처리장비 : 스키드로다 4대(완료), 1대(추진중)/공정 80%

- 왕겨보급 및 톱밥보급 : 왕겨 700대/공정 80%, 톱밥 470대/공정 50%

□ 금후계획

◦ 미 완료사업 현장 지도 및 완료사업 보조금 지급․정산 : 2018. 6 ~ 11월

◦ 지원사업 적정 활용토록 사후관리 지도 : 연중

가축 악성질병 근절

□ 개    요

◦ 사업대상 : 관내 축산농가

◦ 사 업 량 : 가축방역사업 등 6개 사업

◦ 총사업비 : 2,258백만원 (보조 1,791, 자담 467)

◦ 사업계획

세 부 사 업 명	사업량 (두)	사 업 비 (백만원)						비고
		합계	보 조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	6개사업	2,258	1,791	1,064	235	492	467
가축방역예방백신	25,982천두	651	651	331	91	229
소브루셀라채혈비	15,590두	109	109	33	22	54
돼지써코바이러스예방약	180,000두	360	216	108	36	72	144
구제역예방백신(전업농)	340,000두	646	323	226	32	65	323
예방백신 접종시술비	18,500두	92	92	46	14	32
살처분보상금	10,000두	400	400	320	40	40

□ 추진실적

◦ 6개사업 추진 : 전체공정 70%

- 가축특별방역추진 : 2017. 10. 1 ~ 2018. 5. 31까지

· 구제역 : 2건 발생/ 10농가 11,726두 살처분(전북 0건)

· AI  : 22건 발생/ 140농가 6,359만수 살처분(전북 2건)

- 가축방역약품 : 춘계 가축방역완료 25,867천두·수 접종/공정 100%

- 소 브루셀라채혈 : 8,000두 채혈, 양성 0건(결핵 3농가 20두 살처분)

- 돼지써코바이러스 : 상반기 완료 및 하반기 교부결정/공정 80%

- 구제역 예방약 : 238,160두 접종 / 공정 70%

- 살처분 보상금 : 97백만원(3농가 결핵 20두)

□ 쟁점 및 대책

◦ 구제역 AI 차단을 위한 사전 방역조치 필요

□ 소 구제역 2회 일제접종 및 AI 방역 계열회사 책임 강화

□ 금후계획

◦ 구제역 일제접종 추진 : 소ㆍ염소 10월, 사슴 8월

◦ 동절기 구제역 AI 특별방역대책 추진 : 2018. 10. 1 ~ 2019. 5. 31일

가축 상시방역체계 구축

□ 개    요

◦ 사업대상 : 관내 축산농가

◦ 사 업 량 : 공동방제단 운영 등 7개 사업

◦ 총사업비 : 1,187백만원(보조 820, 자담 367)

◦ 사업계획

세 부 사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)						비고
		합계	보 조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	7개사업	1,187	820	250	164	406	367
공동방제단 운영	4개단	140	140	70	21	49
HACCP컨설팅지원	4농가	40	24	12	4	8	16
가축방역기자재·약품	7건	178	178		53	125
유기동물보호사업	250두	25	25		7	18
소독장비지원	20개소	236	118		29	89	118
CCTV등 방역인프라지원	71개소	505	303	152	45	106	202
축 산 차 량 등 록 제	535대	63	32	16	5	11	31

□ 추진실적

◦ 7개사업 추진 : 전체공정 70%

- 공동방제단 운영 : 남원축협 4개단 AI 등 방역을 위해 농가 소독실시

- HACCP컨설팅 : 대상자 1농가 컨설팅 진행중/공정 70%

- 약품 및 기타보상금 : 약품공급 완료 및 매월 기타보상금 지급 완료

- 유기동물 보호사업 : 220두 처리

- 소독장비지원 : AI 예방을 위해 21농가 지원/공정 90%

- CCTV등 방역인프라지원 : 사업대상자 31농가 선정/공정 50%

- 축산차량 등록제 : 490대 등록(매월 4,950원/대)/공정 60%

□ 쟁점 및 대책

◦ 매년 구제역 및 AI 발생으로 질병차단을 위한 방역조치 필요

□ 공동방제단을 적극 활용하여 축종별 집중소독으로 질병차단

□ 금후계획

◦ 공동방제단은 AI등 방역을 위해 축산농가 지속 방역활동 전개

◦ HACCP, 소독장비지원은 신속히 사업추진

친환경농업 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 인증현황 : 1,340ha(친환경 386, GAP 954)/ 경지면적의 8.6%

◦ 사업대상 : 친환경농산물 인증을 받은 농업인 및 법인, 생산자단체, 친환경농업 실천농가 작목반, 퇴비생산업체 등

◦ 사 업 량 : 친환경농업 직접지불제사업 등 12개사업

◦ 사 업 비 : 2,058백만원(보조 1,312, 자담 746)

◦ 사업내역

세부사업명	사업량	사 업 비 (백만원)						비고
		합계	보조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	12개사업	2,058	1,312	487	42	783	746
친환경농업 직접지불제 사업	275ha	170	170	170
친환경인증비용 및 유기농업육성	2개사업	139	139		42	97
친환경쌀 원료곡 현장수매비 친환경쌀 영농자재 지원	2개사업	120	60			60	60
친환경농업 육성자재,유기농업자재 지원 친환경생산기반확대, 농기계지원	4개사업	717	367	7		360	350
친환경퇴비생산시설 현대화사업 퇴비공장 악취저감 약품지원	2개소	412	176	60		116	236	자부담에 융자90포함
친환경잡곡생산유통지원사업	1개사업	500	400	250		150	100

□ 추진실적

◦ 12개사업 추진 : 추진중 12개사업/ 전체공정 50%

- 친환경농업 직접지불제 지원사업 대상자선정 및 이행점검 추진/공정 40%

·사업량 274농가/ 252ha/ 140백만원(5 ~ 11월 이행점검 추진)

- 친환경영농자재 지원사업 추진 : 29농가/ 88ha/ 공정 60%

- 육성자재지원, 생산기반확대지원, 농기계지원사업 추진중/ 공정 60%

·육성자재 : 74농가/ 326ha, 생산기반확대 : 81농가 353ha, 친환경농기계 : 25대

- 친환경퇴비생산시설 현대화사업 추진중 : 1개소/ 300백만원/ 공정 30%

□ 금후계획

◦ 친환경농업직불제 이행점검 및 보상금 지급 : 2018. 6 ~ 12월

◦ 육성자재 지원, 생산기반 확대지원, 농기계 지원사업 추진완료 : 2018. 10월중

◦ 사업조기완료 및 사후관리 실시, 신규 소득지원사업 발굴

친환경농산물 학교급식 공급기반 확대

□ 개    요

◦ 사업대상 : 친환경농업 법인 및 생산자단체, 관내 초·중·고등학교 및 어린이집

◦ 사 업 량 : 친환경농산물 학교급식지원 등 11개사업

◦ 사 업 비 : 4,945백만원(보조 2,650, 자담 2,295)

◦ 사업내역

세부사업명	사업량	사 업 비(백만원)						비고
		합계	보조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	11개사업	4,945	2,650	29	1,113	1,508	2,295
친환경농산물학교급식지원 친환경쌀어린이집급식지원 학교급식(유정란) 지원 학교 과일간식 지원사업	4개사업	519	391	29	139	223	128	자부담에교특 2,250포함
학교무상급식지원	50개교	4,244	2,122		929	1,193	2,122
친환경농산물 소비자 맞춤형체험 유통마케팅,학교실천사업,포장재지원 중소농 농산물 유통지원사업 친환경농산물안전성관리	6개사업	182	137		45	92	45

□ 추진실적

◦ 11개사업 추진 : 추진중 11개사업 / 전체공정 40%

- 친환경농산물 학교급식 지원 완료 : 유치원, 초·중·고 77개교/ 9,261명/ 공정 100%

- 학교 무상급식 지원(초·중·고등학교) 완료 : 50개교/ 7,606명/ 공정 100%

- 학교 친환경농업 실천사업 : 대도시 학교 모내기 체험사업(16개교)/공정 50%

- 소비자맞춤형 체험활동 상반기 지원사업  : 2개소/ 3회/ 800명/ 공정 30%

- 학교급식 유통마케팅, 안전성 관리지원 추진, 포장재 지원사업 : 2개소/ 공정 30%

□ 쟁점 및 대책

◦ 친환경농산물 학교급식 안정적 공급·유통과 판로 확보

□ 친환경농산물 전국 공급망 확대를 위한 소비자체험 등 지속추진

□ 학교급식 등 소비처 요구에 대응할수 있는 친환경 잡곡 생산기반 구축

□ 친환경농산물의 점진적 공공급식 확대(군부대, 기업체, 병원, 요양시설 등)

□ 금후계획

◦ 유통마케팅, 포장재 지원사업, 학교 실천사업 추진완료 : 2018. 11월중

◦ 학교 과일간식 지원, 학교급식 유정란 지원사업 추진완료 : 2018. 12월중

◦ 친환경잡곡 생산·유통, 친환경농산물 유통조직 지원사업 추진완료 : 2018. 12월중

친환경농업 실천기반 확대육성

□ 개    요

◦ 사업대상 : GAP인증농가, 농업경영체 등록농가

◦ 사 업 량 : 유기질비료 지원사업 등 4개사업

◦ 사 업 비 : 8,466백만원(보조 4,376, 자담 4,090)

◦ 사업내역

세부사업명	사업량	사 업 비(백만원)						비고
		합계	보조				자담
			소계	국비	도비	시비
합 계	4개사업	8,466	4,376	2,759	200	1,417	4,090
유기질비료 지원사업	39,549톤	7,285	3,195	2,009		1,186	4,090
토양개량제 지원사업	7,275톤	1,011	1,011	657	177	177
GAP인증농가 안전성검사비지원	149건	28	28	20	2	6
주산지농산물우수관리(GAP) 안전성분석	554건	142	142	73	21	48

□ 추진실적

◦ 4개사업 추진 : 사업완료 2개사업, 추진중 2개사업/ 전체공정 50%

- 유기질비료, 토양개량제 지원사업 완료(327백만원 국비예산 추가확보)

·유기질비료 : 39,549톤, 토양개량제 : 7,275톤

- 주산지농산물 우수관리(GAP)안전성분석 지원사업 대상지선정 : 공정 40%

※ 농산물우수관리(GAP)인증 확대에따른 토양 용수 분석 시료 채취지 확정

- GAP 인증농가 안전성 검사비 지원사업 추진 : 공정 10%

□ 금후계획

◦ 유기질비료 지원사업 대상농가 하반기 살포 지도·점검(과수농가) : 2018. 6 ~ 12월

◦ 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성분석 업체선정 및 사업 추진 : 2018. 11월말

◦ GAP인증농가 안전성 검사비 지원에 따른 지도·점검 : 연중

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2017. 11. 14. (제218회)		발언의원 : 김승곤 의원
발언내용	우리시 고교생에게 양질의 무상급식 시행
◦ 2018년부터 실시하는 우리시 고교생 무상급식 확대에 따른 양질의 급식 시행
추진상황
◦ 학교급식의 질 향상과 운영 개선을 위한 만족도 조사를 매년 실시하고 있으며, 2018년부터 고등학교까지 무상급식이 확대됨에 따라 만족도 조사를 확대 실시할 예정 - 맛, 식재료 품질, 제공량, 영양, 위생분야에 대한 만족도 조사 실시 - 상반기 7월중/ 하반기 10월중 실시 : 반기별 초등 2개교, 중등 2개교, 고등 2개교 ◦ 친환경농산물 안전성 제고와 학교급식 신뢰도 향상을 위하여 학교 현장점검을 실시하고 있으며, 관내 조리교(37개교)에 대하여 현장 점검 실시 예정 - 식재료 유통기한, 보관상태, 친환경농산물 원산지 등 현장 점검 실시 - 9월중 실시 : 관내 초, 중, 고, 특수학교 조리 현장점검

2018. 7.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

산   림   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 덕음산 오감만족 숲 조성사업

◦ 덕음산 철쭉공원 조성사업

◦ 산불방지 대책

◦ 임도사업

◦ 숲길(등산로) 조성사업

◦ 산림병해충 방제

◦ 도시숲 조성 및 가로수 관리

◦ 숲 가꾸기 사업

◦ 산림소득증대사업

◦ 조림사업

◦ 마을 만들기 사업

◦ 백두대간생태교육장 운영

일  반  현  황

□ 기    구

										산 림 과 장
										정 창 호
산림경영담당					산림보호담당						조경시설담당								산림소득담당						백두생태담당
이 재 우					이 승 재						소 민 정								안 성 순						안 도 엽
임도개설 및 관리 숲길(등산로) 정비 임업후계자 선정‧관리 공유재산관리 임업통계 자연휴양림관리 국가산림문화자산 지정및관리					산불방지대책추진산림병해충방제 산지전용허가·협의 산림경영계획인가 목재산업시설현대화 토석채취 허가․지도 숲가꾸기사업 추진						덕음산오감만족숲조성 도시숲 조성·관리 가로수 조성·관리 가로화단조성·관리 요천변 꽃단지 조성 향기원,구역사 꽃단지 조성·관리								조 림 사 업 추 진 둘레길특화림조성 산림소득사업추진 백두대간주민지원 농림사업·농특회계 마을만들기 산촌생태마을관리						백두대간생태교육장 운영 및 관리 ∘전 시 관 ∘체험·휴양시설 ∘생태관광에코롯지 ∘국민여가캠핑장 ∘고원선수촌훈련장

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	4	7	6
현 원	20	1	8	6	2	3	9
증 감	△3	-	3	2	△5	△3

※ 비    고 : 9명(임기제 3, 청원경찰 5, 공무직 1)

2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 요천변, 향기원, 구역사 꽃단지 등 사계절 아름다운 녹지공간 조성 - 춘향제 기간 중 행사장 분위기 고조, 시민과 관광객에 포토장소로 각광 ◦ 봄철 산불방지대책본부 운영 - 2. 1. ~ 6. 15, 산림과 및 20개 읍·면·동

□ 효과적인 산림재해 방지로 시민생활 안정 기여

◦ 봄철 산불방지대책본부 운영(2. 1 ~ 6. 15)

- 감시원 및 진화대 배치(120명)                : 산불발생 17건, 1.08ha

※ ’17년 : 14건/ 1.13ha,    ’16년 : 11건/ 0.87ha,   ’15년 : 14건/ 1.78ha

◦ 산사태 현장예방단 위험지구 순찰          : 2회 354개소

◦ 생활권재해우려목 제거사업                 : 209본

◦ 산림병해충 예찰 및 방제                  : 방제단 4명, 연중

- 소나무재선충병 검경 의뢰(산림환경연구소) : 602본(소나무고사목)

- 갈색날개매미충 지상방제                 : 130ha

□ 지역경제 활성화를 위한 산지 효율적 개발과 경영

◦ 임도사업 : 신설 2개소(보절 진기, 대산 풍촌) 3km/ 200백만원

구조개량 8개소 4km/ 286백만원

◦ 숲가꾸기 : 큰나무가꾸기 등 3개사업 380ha/ 657백만원

◦ 조림사업 : 경제수조림 등 6개사업 252.2ha/ 1,292백만원

◦ 시유림(공유재산) 임대 : 24필지 42명 (95,834㎡)

◦ 소나무 반출 생산 확인  130건    ◦ 불법 산림사건 처리 24건

◦ 산림경영계획 인가       64건    ◦ 토석채취 허가       7건

◦ 불법전용산지신고 수리 177건 (477,015㎡)

◦ 산지전용 : 249건(허가 1, 협의 117, 신고 14, 변경협의 61, 복구설계승인 22, 복구준공 34)

□ 녹색도시를 위한 그린 경관 조성

◦ 덕음산 오감만족 숲 조성

- 어현동 37-147일원/ 오감체험장, 숲속 놀이터·쉼터, 바람언덕 등/ 2,000백만원

◦ 도시숲 조성 및 가로수 관리 : 시도1호선 등 25개소, 소나무 등 10종/ 811백만원

◦ 요천변, 향기원, 구역사 꽃단지 조성(48,554㎡) : 튜울립, 페츄니아, 산파체스 등 5종

□ 산림소득창출을 위한 경쟁력 제고 및 여건 조성

◦ 백두대간주민소득지원사업 : 저온저장고·정제기 등 51개소/ 292백만원

◦ 산림소득증대사업        : 임산물상품화사업 등 8개사업/ 595백만원

◦ 목재산업시설 현대화사업  : 보조사업자(2개소) 선정 및 원가계산 용역 완료

□ 백두대간 생태교육장 운영

【전 시 관】(‘18. 6. 17. 기준)

◦ 운영실적 : 방문객 24,511명(무료 16,794, 유료 7,717) / 수입 23백만원

◦ 특별전 개최 : 2회

- 겨울방학 특별전    : ’17. 12. 23. ~ ’18. 2. 11. / 15,691명

- 봄철 소규모 특별전 : 5. 5 ~ 22. / 3,598명

◦ 물놀이터(500백만원), 유아숲체험원(150백만원) 조성

【체험휴양시설】

◦ 운영실적 : 방문객 7,539명/ 수입 12백만원

◦ 힐링 캠핑장(50백만원) 조성

【에코롯지·캠핑장】

◦ 운영실적 : 방문객 6,236명/ 수입 40백만원

	하반기 추진방향
◦ 덕음산 오감만족 숲 조성을 통한 휴양공간 확보로 시민 휴식처 제공 ◦ 소득지원사업 적극 추진으로 산림산업 경쟁력 강화 ◦ 물놀이터 개장, 유아숲 체험원 운영을 통한 백두대간생태교육장 활성화 ◦ 숲가꾸기, 조림사업을 통한 산림자원의 경제·사회적 가치제고

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

덕음산 오감만족 숲 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 어현동 37-147 일원

◦ 사업규모 : 12,864㎡

◦ 사 업 비 : 2,000백만원(균특 1,000 시비 1,000)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

◦ 사업내용 : 오감체험장, 숲속놀이터, 숲속쉼터, 철쭉동산, 편백나무숲, 바람언덕, 명상원, 입구광장 등

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역, 원가심사, 실시계획인가            : ‘17.  3 ~ 10월

◦ 1차년도 계약 및 공사착수                       : ‘17. 11 ~ 12월

◦ 동절기 공사중지                                 : ‘18.  1월

◦ 1. 2차년도 사업시행(공정율 50%)               : ‘18.  3월 ~

- 잡관목 제거, 폐기물처리, 토공정지 완료

- 시설물 설치(명상원 데크, 전망데크, 기단, 놀이시설)

- 우배수로, 상수도, 식재공사 추진중

◦ 편입분묘(유연 1, 무연 15기) 보상 및 개장공고     : ‘18.  4 ~ 7월

□ 쟁점 및 대책

◦ 우기 토양유실로 기 설치 시설물 등 훼손 우려

□ 배수로, 저류지 등 수시점검, 폭우시 인력, 장비 현장대기

□ 금후계획

◦ 무연분묘 개장절차 이행(허가, 승화원 안치)       : 7 ~ 8월

◦ 조경사업(초화, 관목류) 마무리                   : 7 ~ 8월

◦ 입구광장 포장공사, 편의시설(벤치 등) 구입설치   : 8월

덕음산 철쭉공원 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 어현동 37-99 일원

◦ 사업규모 : 0.8㏊

◦ 사 업 비 : 700백만원(특별교부금 500 시비 200)

※‘18년 사업비 : 200백만원(덕음산 철쭉공원 탐방로 조성사업)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

◦ 사업내용 : 철쭉 51,600주, 데크로드 259m, 전망데크 1식, 숲가꾸기 1식

□ 추진실적

【 2017년 】

◦ 내    용 :  철쭉 51,600주, 데크로드 153m, 전망데크 1식, 숲가꾸기 1식   【 2018년 】

◦ 내    용 : 데크로드 106m(철쭉공원 탐방로)

◦ 일    정

- 실시설계 및 설계서 검토                          : 1 ~ 3월

- 원가심사                                       : 4월

- 실시계획 인가                                  : 5월

- 조달청 수의총액 구매협의, 보완                  : 5 ~ 6월

- 사업착수                                       : 6월

□ 쟁점 및 대책

◦ 시가지 가시권역 암반구간 철쭉식재 부적지 발생

□ 어린묘 구입 암벽 틈새 식재로 완성도 제고

□ 금후계획

◦ 탐방로 조성사업 데크설치 마무리                  : 7월

◦ 암반구역 어린묘(철쭉) 식재                        : 7월

◦ 철쭉 사후관리(급수, 잡관목 제거, 시비작업)        : 7 ~ 10월

산불방지 대책

□ 개    요

◦ 임야면적 : 46,910㏊(시 면적의 62.4％)

◦ 사 업 비 : 1,709백만원(국비 345, 도비 230, 시비 1,134)

◦ 기    간 : 봄철(2. 1. ~ 6. 15.), 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 진화장비 : 산불진화차, 무전기, 등짐펌프 등 16종 4,186점

□ 추진실적

◦ 봄철 산불방지 대책본부 운영      : 21개소(본청1, 읍면동 20)

◦ 봄철 산불발생건수 : 17건/ 1.08㏊  ※‘17년 : 14건/ 1.13ha, ‘16년 : 11건/ 0.87ha

- 원 인 별 : 농·임업 부산물 소각 9건, 논·밭두렁 소각 8건

- 조    치 : 산불발화자 중 15명 검거(산림보호법에 의거 의법조치)

※ 발화자 평균연령 : 74세(80세이상 고령자 5명)

◦ 산불위험요인 사전 제거(70ha)     : 2. 1. ~ 4. 15

◦ 산불감시원 및 기동진화대원 배치  : 120명(전문진화대 29명, 감시원 91명)

◦ 임차헬기 배치 : 1대/ 93백만원(남원, 순창, 임실, 장수)/ 월락배수지

◦ 입산통제구역 지정 및 등산로 폐쇄 : 7개소 5,801㏊/ 7개 노선 24㎞

◦ 지방선거 대비 대책본부 연장 운영 : 본청 1개소/ 5. 16 ~ 6. 15.

◦ 산불소화시설 설치사업 시행 : 5. 10 ~ 9. 18.

- 흥부골자연휴양림/ 142백만원

□ 금후계획

◦ 가을철 산불방지대책 추진         : 11. 1 ~ 12. 15.

- 산불감시원 및 진화대원 사역     : 70명(진화대 20, 감시원 50)

- 입산통제구역 및 등산로 폐쇄     : 7개소 5,801㏊/ 7개 노선 24㎞

임  도  사  업

□ 개    요

◦ 위    치 : 보절 진기 임도 등 10개 노선

◦ 사 업 량 : 41㎞

◦ 사 업 비 : 873백만원(균특 576, 시비 297)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

◦ 사업내용 : 신규 개설 3km, 구조개량 4km, 보수 9km, 지장목제거 25km

※ 기존임도(1985 ~ 2017) : 33개 노선 114.834㎞

□ 추진실적

◦ 임도구조개량사업 : 완료

- 위    치 : 산내 입석, 수지 고평 등 8개소

- 사업량/사업비 : 4km, 286백만원

◦ 임도신설사업 : 90%(공정율)

- 위    치 : 보절 진기, 대산 풍촌 2개소

- 사업량/사업비 : 3km, 200백만원

◦ 임도관리원 사역 : 1명/ 15백만원/ (3 ~ 12월, 10개월)

- 작업내용 : 임도 풀베기 및 노면정비

□ 금후계획

◦ 임도보수 사업                              : 장마 이후 ~ 10월

◦ 풀베기, 잡관목 제거 등                      :  8월 ~ 추석 전

◦ 2019년 사업 사전설계                       : 10 ~ 12월

- 보절면 진기리 ~ 서치리 1km, 이백면 효기리 1km

숲길(등산로) 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 백두대간 숲길 등 4개소

◦ 사 업 량 : 50㎞

◦ 사 업 비 : 390백만원(균특 100, 시비 290)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

◦ 사업내용 : 탐방객 안전시설 및 유지 관리(약 100km)

※ 기존숲길 : 덕음산, 백두대간 등 253.95㎞

□ 추진실적

◦ 백두대간 등 4개소 : 완료

- 위   치 : 백두대간(여원제~운봉 매요), 신선자락길(산내 삼화~내령), 견두산, 덕두봉

- 사업량/사업비 : 32.5km, 287백만원

◦ 천황봉 정비 : 50%(공정율)

- 위   치 : 천황봉 등산로

- 사업량/사업비 : 10km, 90백만원

- 사업기간 : 5. 23. ∼ 8. 20.

◦ 주요등산로 풀베기사업

- 위치/연장 : 교룡산, 덕음산, 덕두봉/약 10km

□ 금후계획

◦ 풀베기, 잡관목 제거 등                        :  8월 ~ 추석 전

◦ 등산로 현지점검 후 2019년 사업대상지 선정     :  9 ~ 10월

◦ 2019년 사업 사전설계                          : 10 ~ 12월

산림병해충 방제

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 165ha

◦ 사 업 비 : 322백만원(국비 59, 도비 23, 시비 240)

◦ 사업내용 : 꽃매미, 갈색날개매미충 등 산림병해충 방제 및 소나무재선충병 예방

□ 추진실적

◦ 예찰활동 : 2 ~ 11월(10개월) /방제단 4명

- 시료채취, 고사목제거, 산림병해충 방제 등

- 소나무재선충병 조기발견 위한 시료 검경의뢰 : 602본

◦ 생활권 수목진료 민간컨설팅 : 1. 22. ~ 10. 31.(기간중 9회 진단)

◦ 소나무재선충병 예방나무주사사업 : 536본(보호수, 마을숲 등 15개소)

◦ 해충퇴치기 설치 : 22대(에코롯지 19, 체험휴양시설 3)

◦ 꽃매미 등 알집제거 : 2ha

◦ 갈색날개매미충 등 기타 해충방제(1차) : 130ha(5. 25. ~ 6. 5.)

◦ 농경지 연접 돌발해충(갈색날개매미충, 흰불나방 등) 방제 : 10ha

□ 쟁점 및 대책

◦ 임실, 순창, 구례, 함양 소나무 재선충병 발생

□ 예찰 강화 및 재선충예방나무주사 사업 시행으로 소나무재선충병 청정지역 유지

□ 금후계획

◦ 갈색날개매미충 등 기타해충 지상방제(2차, 130ha)  :  7 ~ 8월

◦ 해충포집기 설치                                 : 11월

◦ 산림병해충 예찰 및 방제                         : 지속 추진

도시숲 조성 및 가로수 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 도시숲 1.5㏊, 가로수 5.2㎞, 가로수 관리 150㎞

◦ 사 업 비 : 1,222백만원(균특 500 시비 722)

※ 가로수 현황 : 왕벚·살구·배롱나무 등 12종 335㎞ 50,283주

□ 추진실적

◦ 도시숲 조성

- 위    치 : 전주선 시민화단, 덕음산 일원

- 사 업 량 : 3개소 / 200백만원

·전주선 시민화단 : 실편백 25주, 철쭉 15,120주

·덕음산 솔바람길 : 편백 138주, 꽃무릇외 3종 58,821본,

·덕음산 철쭉공원 : 자산홍 13,708주

◦ 가로수 조성·관리

- 조 성 : 노송로 외 6개 노선 (L=4.2㎞) / 392백만원

·노송로(송동선) 가로수        ( 배롱나무 480주 )

·관문도로(시도1호선) 하층식생 ( 금계국 60,956본 )

·요천 100리 가로수 보식       ( 왕벚·살구나무 189주 )

·황산로 가로수                ( 배롱나무 50, 자산홍 9,768주 )

·오들로 가로수 식재           ( 왕벚나무 31주 )

·기타(풍천, 주천 덕촌)         ( 왕벚나무 200주 )

- 이 식 : 3.1운동기념탑, 김병종미술관 등/ 소나무, 배롱, 은행 등 84주 / 55백만원

- 관 리 : 병해충방제, 전지·전정, 풀베기(L=86㎞) / 164백만원

□ 금후계획

◦ 가로수(용성중로, 시가지) 조성                    : 9 ~ 11월

◦ 도심재생구간 도시숲 조성                       : 9 ~ 11월

◦ 가로수 관리(병충해방제, 전지, 풀베기 등)         : 연중

숲 가꾸기 사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 사 업 량 : 1,450ha

◦ 사 업 비 : 2,170백만원(국비 1,085, 도비 325, 시비 760)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

◦ 내    용

- 조림지가꾸기   : 1,000ha/1,391백만원(조림후 3년~5년까지 풀베기 등)

- 어린나무가꾸기 :   150ha/  249백만원(조림후 5년~10년까지 가지치기)

- 큰나무가꾸기   :   300ha/  530백만원(조림후15년부터 피해목제거)

□ 추진실적

◦ 조림지가꾸기   : 인월 등 19개 읍‧면‧동 511ha(설계 완료)

◦ 어린나무가꾸기 : 운봉 등 12개 읍․면   150ha/ 249백만원(공정율 80%)

◦ 큰나무가꾸기   : 사매 등 13개 읍․면․동 230ha/ 408백만원(완료)

□ 금후계획

◦ 숲가꾸기 사업 지속 시행                        : 7 ~ 12월

- 조림지풀베기 489ha/ 1,391백만원

- 큰나무가꾸기  70ha/   122백만원

◦ 2019년 사업 사전설계 300ha/ 30백만원           : 12월

◦ 관리감독 철저 및 적기 사업완료

산림소득  증대사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 임업인 또는 생산자단체

◦ 사 업 량 : 임산물생산기반조성 등 9개사업

◦ 사 업 비 : 1,055백만원(국비 630, 도비 108, 시비 317)

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

□ 추진실적

(단위 : 백만원)

사 업 명		사 업 비			내 용
		예산액	집행액	잔액
계		1,055	887	168	190개소
산림작물 생산기반조성	생산기반조성	87	56	31	12개소(예취기, 관정, 선별기 등)
	친환경임산물	182	181	1	39개소(혼합유박, 퇴비, 토양개량제)
	생산단지조성 (소액)	190	113	77	20개소(표고하우스, 관상수 식재 등)
	밤대체작목 조성	6	-	6	고소득 대체작목 전환
임산물유통 구조개선	임산물상품화	113	110	3	16개소(포장박스, 디자인개발)
	유통기반조성	84	69	15	33개소(저온저장고, 건조기 등)
백두대간주민소득지원사업	백두대간 주민소득	309	292	17	51개소(저온저장고, 정제기, 건조기 등)
목재펠릿 보일러보급	목재펠릿 보일러	17	3	14	1개소(주택용)
산림소득작물 재배지원사업	소득작물 재배지원	67	63	4	18개소(표고자목, 왕대추․참두릅 묘목)

□ 금후계획

◦ 보조사업 추가 대상자선정 및 사업시행               : 7 ~ 12월

◦ 완료사업 보조금 지급 및 사후관리 철저            : 7 ~ 12월

조  림  사  업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 임야

◦ 사 업 량 : 338ha

- 경제림 조성 : 253ha(경제림 220, 특용수 30, 유휴토지 3)

- 큰나무 조림 :  60ha(큰나무공익조림 10, 산림재해방지림 50)

- 지역특화조림 : 25ha(지리산둘레길 25)

◦ 사 업 비 : 1,839백만원(국비 813, 도비 308, 시비 718)

□ 추진실적

◦ 봄철 조림사업 시행 : 3 ~ 4월

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량 (ha)		사업비			식재 수종	비고
		계획	실적	예산액	집행액	잔액
계		338	252.2	1,839	1,292	547
경제림 조 성	경 제 림	220	170	774	607	167	편백, 상수리, 백합	완료 (가을 50ha)
	특 용 수	30	15.2	134	36	98	호두, 옻, 두릅 등	추가 모집
	유휴토지	3	2	12	4	8	호두, 음나무	〃
큰나무 조 림	큰 나 무 공익조림	10	10	92	92	-	왕벚나무, 배롱나무, 영산홍 등	완료
	재해방지림	50	35	327	153	174	편백, 소나무	완료 (가을 15ha)
지역 특화림	지리산둘레길	25	20	500	400	100	느티, 이팝, 산딸, 남천 등	완료 (가을 5ha)

□ 금후계획

◦ 조림지 활착상황 조사                              : 7 ~  8월

◦ 민간자본보조조림 추가 모집                        : 7 ~  9월

◦ 가을철 조림사업 시행                              : 9 ~ 10월

- 86ha(경제림 및 재해림 65, 민간자본보조조림 16, 특화림 5)

마을 만들기 사업

□ 개    요

◦ 마을만들기 : 4개소

- 공동문화복지 : 주천면 내송마을

- 환경경관생태 : 산내면 내령·와운마을

- 산림휴양치유마을 : 주천면 노치마을

◦ 총사업비 : 2,000백만원(균특 1,400, 시비 600)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2019년

◦ 사업내용 : 마을회관 리모델링, 생태공원조성, 쓰레기분리수거함 설치, 산책로 정비 등

□ 추진실적

◦ 산림휴양 치유마을 공모사업 신청 (달궁)            : 2월

◦ 기본계획 및 실시설계용역 (노치)                      : 3 ~ 7월

◦ 기본계획고시 (내송·내령·와운)                      : 4 ~ 5월

◦ 사업 시행(내령)                                      : 5월

□ 금후계획

◦ 기본계획 협의(전북도) 및 고시(노치)                  : 7 ~ 8월

◦ 사업 시행(내송·와운·노치)                       : 7 ~ 12월

※ 내송·와운 : 7월 / 노치 : 9월

◦ 산림휴양치유마을 공모사업 선정(달궁)               : 9월

백두대간생태교육장 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉로 151일원

◦ 면    적 : 전시관·에코롯지·캠핑장 78,028㎡, 체험휴양시설 210,545㎡

◦ 사 업 비 : 1,555백만원(전시관 1,182, 체험휴양시설 200, 에코롯지 137, 캠핑장 36)

◦ 사업내용 : 물놀이터, 힐링캠핑장, 유아숲체험원, 특별전 개최 등

□ 추진실적

【전 시 관】

◦ 운영실적  ※ ’18. 6. 17. 기준

- 방문객 24,511명(무료 16,794, 유료 7,717)/ 수입금 23백만원

◦ 물놀이터 조성(’18. 1 ~ 6.)/ 500백만원

◦ 유아숲체험원 조성(’18. 1 ~ 6.)/ 150백만원

◦ 특별전 개최(2회)

- 겨울방학 특별전(’17. 12. 23. ~ ’18. 2. 11.)/ 15,691명

- 봄철 소규모 특별전(5. 5. ~ 22.)/ 3,598명

◦ 노치마을 사진전 개최(5. 15. ~ 현재)

【체험휴양시설】

◦ 운영실적 : 7,539명/ 107동/ 수입금 12백만원

◦ 힐링 캠핑장 조성(’18. 1. ~ 6.)/ 50백만원

◦ 두근두근! 백두대간 부부태교교실 운영(’18. 6. 16.)/ 1백만원

【에코롯지·캠핑장】

◦ 운영실적

- 에코롯지 : 1,448명/ 181실/ 24백만원

- 캠 핑 장 : 4,788명/ 798면/ 16백만원

□ 금후계획

◦ 방학 특별전 2회 개최                             : 7월, 12월

◦ 물놀이터, 힐링 캠핑장 개장                       : 7월

2018. 7.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

도   시   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 도시관리계획(일반주거지역세분 및 최고고도지구) 변경

◦ 교룡대로 개설사업

◦ 신정대로 개설사업

◦ 지리산 I.C 진입도로 개설사업

◦ 용성중로 정비공사

◦ 새터중로 개설사업

◦ 통행 불편한 시가지 인도정비사업

◦ 도시가로망 개설사업

◦ 도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

◦ 남원 도시재생사업

◦ 남원 사매 일반산업단지 조성사업

◦ 남원 일반산업단지 국고지원사업

◦ 공원조성 및 유지관리

□ 시정질문·5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

										도 시 과 장
										진 영 신
도시계획담당					도시정비담당						도시재생담당								산업용지조성담당						공원담당
차 남 희					이 영 진						안 용 운								한 종 수						김 형 준
◦도시기본, 관리 계획수립 ◦도시계획시설 결정및인가 ◦지구단위계획 수 립 ◦개발행위허가 ◦전문건설업관리					◦도시가로망 사업 시행 및 정비 ◦안전한 보행 환경조성 ◦전선 지중화 사업 ◦시가지 인도 정비사업						◦지역개발사업 ◦도시재생사업 ◦노암산업단지 연결도로 공사 ◦지역수요맞춤지원 공모사업 ◦온천개발 업무								◦일반산업단지 조성 ◦농공단지 지정 및 조성 ◦산업용지 보상 및 수용재결 ◦골프장 조성 지원						◦공원 녹지 기본계획 (변경) 수립 ◦공원 조성 사업 공사 감독 및 용지 보상 ◦공원 및 녹지점용허가

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	5	8	6	2
현 원	20	1	6	5	5	3	공무직 1
증 감	△2	-	1	△3	△1	1

□ 인    력

□ 도시관리계획

(2018. 06월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.42 (36.7)	337.75 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2018. 06월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.063 (0.21)	6.351 (20.72)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.06)	1.835 (5.99)	20.415 (66.61)	0.983 (3.21)
남 원	26.646 (100%)	0.063 (0.24)	5.355 (20.10)	0.016 (0.06)	0.784 (2.94)	0.020 (0.07)	1.835 (6.89)	18.573 (69.70)	-
운 봉	1.660 (100%)	-	0.505 (30.42)	-	0.093 (5.60)		-	0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.341 (100%)	-	0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)		-	1.142 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역내 도시계획 도로

(2018. 06월 기준)                                               (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	791	9,299	553	8,522	238	777	91.6
대 로	35	2,367	23	2,090	12	277	88.3
중 로	138	3,746	106	3,466	32	280	92.5
소 로	618	3,186	424	2,966	194	220	68.6

□ 건설업체 현황

(2018. 06월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
260	427	260	427	204	358	56	69	32	35

2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 남원시 전체에 대한 도시관리계획을 재정비 하여 토지이용 효율성 제고 ◦ 도시가로망 정비 및 확충으로 교통안전 및 생활편의 도모 ◦ 일반산업단지 조성사업 본격 추진으로 지역발전 기반 구축 ◦ 건전하고 체계적인 도시공원 조성

□ 2019년 국가예산 확보 : 5개 사업 /  76.5억원

◦ 북남원 I.C 남원 원도심 연결도로	/  20억원

◦ 도시활력 증진지역 개발사업	/   5억원

◦ 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치	/  20억원

◦ 일반산업단지 공업용수도 건설사업	/  29억원

◦ 중앙공원 조성사업	/  2.5억원

□ 도시관리체계 정비 시행

◦ 일반주거지역 세분 및 최고고도지구 정비 추진하여 불합리하고 토지이용 효율성이 떨어지는 사항에 대한 제고방안 검토 시행

◦ 자연취락 400여개소에 대하여 30~40호 이상 마을의 자연취락지구 지정 검토를 통해 바도시지역 토지이용의 효율성 제고

◦ 도시계획 조례 정비를 통하여 특정시설물(태양광발전시설)에 대한 기본 가이드라인 제시(자연경관 보호)

□ 기반시설 확충, 지역 접근성 개선과 주민편의 도모 / 24,936백만원

◦ 도시가로망 준공 : 6개 지구(L=1,189m) / 4,670백만원

- 중로/1개 지구(충열사), 소로/5개지구(봉당길, 서문길, 광석마을, 장승마을, 네마실1길)

◦ 공사중 : 14개 지구(L=12,127m) / 17,766백만원

- 대로/4개 지구(교룡, 신정, 지리산IC, 롯데마트)

중로/4개 지구(용성 중로, 용정마을앞, 노암산업단지, 새터 중로)

소로/6개 지구(고산길, 호치길, 동충5통, 운봉 서천1길, 향교5가~구역사 지중화, 인월 서무)

◦ 설계중 : 4개 지구(L=1,465m) / 2,500백만원

- 중로/3개 지구(운봉로, 운봉시가지 지중화, 용성로 지중화)

소로/1개 지구(금동8통)

□ 구도심권 활성화를 위한 도시재생사업 본격 추진

◦ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 착수(`18. 3.)

◦ 꿈꾸는 마을 문화공간(구군청 지하) 리모델링 공사 착수(`18. 6.)

◦ 제4기 도시재생대학 운영을 통한 주민 역량강화 활동(수료자 : 47명)

◦ 주민 협동조합 사회적 경제 활동 추진(예루원 트래블라운지)

⇒ 예루원 떡카페팀, 낭만춘향 한브랜드

◦ 빈집․빈점포를 활용한 창업 리모델링사업 공모 선정(4개팀)

⇒ 이색 김부각 생산․판매(2개팀), 복합문화공간(카페+공연),                  시민 사랑방(북카페․북스테이)

□ 일반산업단지 조성사업 내실있는 단계적 추진 / 4개사업 135억원

◦ 일반산단조성사업(2차분) 착공(‘18. 4. 23) / 777천㎡, 90억원 / 공정률 30%

◦ 진입도로개설사업(3차분) 착공(‘18. 4. 16) / L=2.1㎞, 20억원 / 공정률 90%

◦ 공업용수도건설사업(1차분) 착공(‘18. 6. 26) / 관로(D350㎜) 16㎞, 배수지 2,000㎥ / 18억원

◦ 폐수 연계처리 시설공사 실시설계용역 조달청 발주 의뢰(‘18. 6. 1)  /  7억원

□ 도시공원의 체계적 조성 및 관리

◦ 장기미집행 도시공원 사유지 매입 추진

- 금암공원 3,394㎡/453백만원,  -월락공원 : 감정평가 추진중

◦ 어린이놀이터 개선을 위한 리모델링공사 추진

- 워터파크 조성 : 도통6호(2,557㎡/652백만원)

- 시설 재정비 : 도통3, 7호(5,273㎡/190백만원)

◦ 건전하고 쾌적한 도시공원 유지․관리 : 16개소(근린 4, 어린이 12)

- 예초 등 조경지 관리 및 놀이터 등 시설물 안전점검 실시

◦ 도시공원 조성을 위한 기본계획 수립 용역 추진 :‘18.3.20~‘19.1.13

- 대    상 : 중앙공원, 금암공원(중앙 41,247㎡, 금암 40,000㎡)

- 용역수행 : 전북대학교 산학협력단

- 용 역 비 : 173백만원

	하반기 추진방향
◦ 안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충 및 지속 정비 ◦ 시외버스터미널 주변 지역 도시재생 뉴딜 공모사업 적극 대응 ◦ 일반산업단지 조성사업 및 기반시설 조성사업 지속적 추진 ◦ 장기미집행 도시공원 사유지 매입 추진 ◦ 도시공원(중앙 및 금암공원) 기본계획수립 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

도시관리계획(일반주거지역세분 및 최고고도지구) 변경

□ 개    요

◦ 일반주거지역 세분

- 주거지역 대비 99%로 지정되어 관리되고 있는 제2종일반주거지역에 대하여 제1종, 제2종, 제3종으로 세분(제1종 : 제2종 비율 3 : 7)

◦ 최고고도지구 재검토

- 구 도심권의 발전 방향과 재건축을 앞둔 노후 아파트 단지에 대한 관리방안 마련 (문화재보호구역 주변지역 고도지구 해제)

◦ 자연취락지구 지정

- 비도시지역 내 자연마을(456개소) 대상 검토 지정(30~40호 이상 마을 우선지정 200개소)

◦ 성장관리방안 수립 및 장기미집행시설(근린공원 관리방안) 검토

◦ 사 업 비 : 464백만원

◦ 사업기간 : 2017. 12. ~ 2018. 12.

□ 추진실적

◦ 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행	: 2017. 12. 29.

◦ 도시관리계획 결정(변경) 안 검토	: ~ 2018. 6.

- 도로 변경 5개소, 주차장 1개소 신설 추진

□ 쟁점 및 대책

◦ 일반주거지역 세분에 따른 종하향(제2종⇒제1종)시 주민 반대 우려

⇒ 주민 피해가 없는 범위 내 계획을 수립토록 하겠으며 문화재 보호법에 따른 층수 제한 지역에 대하여 우선 검토시행

※ 제1종과 제2종의 건축행위제한은 거의 차이가 없으며 용적률 부분에서    차이가 있음. (제1종 : 200%, 제2종 : 250%)

□ 금후계획

◦ 계획 입안 및 주민공람 시행	: 2018. 7. ~ 8.

◦ 관련 부서 협의 및 시 도시계획위원회 자문․심의	: 2018. 8. ~ 9.

◦ 전북도 승인요청 및 도 도시계획위원회 심의	: 2018. 10.

◦ 도시관리계획 변경 사항 고시 및 지형도면 고시	: 2018. 12.

◦ 일반주거지역 현황

일반주거 지역면적 (㎢)	제1종일반주거지역		제2종일반주거지역		제3종일반주거지역
	면적(㎢)	구성비(%)	면적(㎢)	구성비(%)	면적(㎢)	구성비(%)
6.41	0.06	0.94	6.35	99.06	-	-

◦ 최고고도지구 현황

구분	계	3층이하	5층이하	8층이하	10층이하	15층이하
개소	44	7	9	18	7	3
면적(㎡)	4,132,000	683,000	1,100,000	1,591,000	521,000	237,000

◦ 자연취락지구 현황

구분	자연취락지구		비고
	면적(천㎡)	개소
전주시	3,305	156
군산시	2,035	62
익산시	2,735	83
정읍시	2,723	36
남원시	590	19
김제시	538	21

◦ 성장관리방안 수립

구분	내용
성장관리방안 시범수립	‣ 난개발이 예상되는 지역에 대한 관리방안 수립 ∙ 건폐율 완화 : 계획관리 40%⇒50%, 자연녹지/생산관리 20%⇒30% ‣ 수립예정지 : 조산동 보건소 일원 자연녹지지역 (512,000㎡) 검토 ∙ 장례식장, 도축장, 시장 등 각종 시설 입지 및 제2종일반주거지역이 산재된 지역으로 계획적 관리방안 필요

◦ 장기미집행시설 현황

구 분	결정		미집행			10년 이상 장기미집행
	시설수	면적(㎢)	시설수	면적(㎢)	사업비	시설수	면적(㎢)	사업비
계	1,103	40.82	257	4.34	1,794	238	3.1	1,499
도로	791	9.3	238	0.78	1,200	225	0.73	1,078
공원	32	3.15	9	1.88	185	9	1.88	185
녹지	47	0.28	-	-	-	-	-	-
기타	233	28.09	10	1.68	409	4	0.49	236

교룡대로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(의총로 3가 ~ 향교동 신협 ~ 시청로 3가)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1.3km, B=25~35m

(1구간:지적공사~신협 0.8km, 2구간: 신협~시청3가 0.5km)

※ 도시계획시설 : 대로 1-10호선(1963. 08. 26)/ 대로3-5호선(1976.12.07)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020(6개년)

◦ 사 업 비 : 18,000백만원(공사비 7,000백만원, 보상비 11,000백만원)

(단위: 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019이후	비 고
계	18,000	4,000	7,000	3,250	3,750
지특(생활)	4,000	-	-	250	3,750
시 비	14,000	4,000	7,000	3,000	-

□ 추진실적

◦ 용지보상 추진	: 2015. 1. ~ 2018. 6. 25.

- 총 보상대상 : 90필지 40,479㎡ / 실적 : 78필지 35,5266㎡(92.8%)

◦ 실시설계 용역 완료(1․2구간) 완료	: 2017. 8. ~ 2018. 6.

◦ 2구간(신협~시청3가)공사 시행	: 2017. 12. ~ 2018. 12.

◦ 1구간(지적공사~신협)공사 시행	: 2018. 6. ~ 2020. 12.

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입토지 12필지 4,952㎡)   : 2018. 7 ~ 2018. 12.

◦ 2구간(신협~시청3가) 공사 완료	: 2018. 12.

◦ 1구간(지적공사~신협) 1차분 공사 완료	: 2018. 12.

신정대로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동(금동아파트) ~ 신정동(국도17호선 신정교차로)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1.5km, B=25m, 교량 1개소

(1구간:신정교차로~어린이집 0.9km), 2구간: 어린이집~금동APT 0.6km)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2021(7개년)

◦ 사 업 비 : 18,000백만원(공사비 15,000백만원, 보상비 3,000백만원)

(단위: 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019이후	비 고
계	18,000	1,500	1,000	3,000	12,500
시 비	18,000	1,500	1,000	3,000	12,500

□ 추진실적

◦ 용지보상 추진	: 2001 / 2016 ~

- 총 72필지 25,783㎡중/ 58필지 22,937㎡ 완료(81%)

◦ 국가지정 문화재(만복사지) 현상변경 허가 재심의(가결) : 2016. 05. 11.

※ 문화재구역 밖으로 선형변경 심의 완료

◦ 도시관리계획 변경 추진(선형 변경 및 폭원 축소 등) : 2016. 6 ~ 2017. 5

◦ 실시설계 용역 시행(1구간 완료)                : 2017. 10. 11. ~ 2018. 4.

◦ 1구간(신정교차로~어린이집) 공사 시행          : 2018. 6. ~ 2020. 12.

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미매입 토지 15필지 2,846㎡)	: 2018. 7. ~ 2018. 12.

◦ 2구간(어린이집~금동APT) 공사 시행	: 2018. 8. ~ 2021. 12.

지리산I.C 진입도로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면(지리산IC) ~ 인월면(인월 교차로)

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=2.0km, B=25m, 교량1개소(L=20m)

도시계획구간(L=900m), 비도시계획구간(L=1,100m)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021(5개년)

◦ 사 업 비 : 12,000백만원(공사비 10,000백만원, 보상비 2,000백만원)

(단위: 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019이후	비 고
계	12,000	-	400	2,000	9,600
시 비	7,400	-	400	2,000	5,000
국 비	4,600	-	-	-	4,600

□ 추진실적

◦ 중기 지방계획 반영	: 2017. 9. 25.

◦ 지방투자심사 완료	: 2017. 11. 16.

◦ 실시설계 용역 완료	: 2017. 11. 15. ~ 2018. 5.

◦ 비도시지역 도로개설 건의(남원시→한국도로공사)	: 2018. 4월/5월

◦ 도시계획구간(L=0.9km) 공사 시행	: 2018. 5. 29.

◦ 용지보상 추진	: 2018. 5. ~

- 총 38필지 9,011㎡중/ 9필지 1,982㎡ 완료(20%)

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미매입 토지 29필지 7,029㎡)	: 2018. 7. ~ 2018. 12.

◦ 1차분 공사 완료	: 2018. 6. ~ 2018. 12.

용성중로 정비공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 도통동(도통아파트 4가) ~ 월락동(월락주유소 3가)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1,150m, B=20m

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3개년)

◦ 사 업 비 : 6,000백만원(공사비 4,300백만원, 보상비 1,700백만원)

(단위: 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019이후	비 고
계	6,000	1,000	2,500	2,500	-
시 비	6,000	1,000	2,500	2,500	-

□ 추진실적

◦ 용지보상 추진	: 2016. 7. ~

- 토지 34필지 1,805㎡중/ 31필지 1,747㎡완료(98%)

◦ 실시설계 용역 완료	: 2017. 9. 1.

◦ 1차분 공사 완료	: 2017. 9. 29. ~ 2018. 6. 22.

◦ 2차분 공사 착공	: 2017. 12. 11.

◦ 3차분 공사 착공	: 2018. 5. 4.

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입토지 3필지 58㎡)	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 전체분 공사 완료	: 2018. 12.

새터중로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동(새터마을) ~ 조산동(요천로)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=400m, B=20m, 교량 1개소(L=70m)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021(5개년)

◦ 사 업 비 : 5,500백만원(공사비 5,134백만원, 보상비 366백만원)

(단위: 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019이후	비 고
계	5,500	-	200	1,200	4,100
시 비	5,500		200	1,200	4,100

□ 추진실적

◦ 중기 지방계획 반영	: 2017. 9. 25.

◦ 지방재정 투자심사 완료	: 2017. 11. 16.

◦ 실시설계 용역 완료	: 2018. 5. 21.

◦ 용지보상 추진	: 2018. 1. ~

- 토지 19필지 5,138㎡중/ 15필지 4,019㎡완료(81%)

◦ 공사 시행(총괄분)	: 2018. 5. 31.

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입토지 4필지 1,119㎡)	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 1차분 공사 완료	: 2018. 12.

통행 불편한 시가지 인도정비사업

□ 개    요

◦ 사업규모 : 보행자도로 인도설치 3지구, L=1.8㎞

◦ 총사업비 : 3,450백만원(2018 : 2,300백만원)

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2025(10개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	위치	사업량	총 사업비	기투자	2018	2019 이후	비고 (사업기간)
계		3지구 L=1,800m	3,450	1,150	2,300	-
롯데마트~의료원간	도통	L=600m B=5.0m	1,950	1,150	800	-	2016~2018
운봉시가지 지중화공사	운봉	L=730m B=2.0m	700	-	700	-	2018
향단로,용성로 안전한보행환경	죽항	L=470m B=1.5m	800	-	800	-	2018

□ 추진실적

◦ 공사 착공

- 롯데마트 ~ 의료원간	: 2017. 8. 2.

◦ 지중화공사 협약 체결(남원시↔한전)	: 2018. 6.

◦ 지중화공사 실시설계(운봉로, 향단로, 용성로)   : 2018. 2. ~

◦ 운봉 시가지 지중화공사 분담금(500백만원) 1차 납부 : 2018. 6. 19.

□ 금후계획

◦ 롯데마트 ~ 의료원간 공사 완료	: 2018. 11.

◦ 지중화공사 실시설계(운봉로, 향단로, 용성로)완료 : 2018. 7.

◦ 지중화공사(운봉로, 향단로, 용성로) 공사시행	: 2018. 7. ~ 2018. 12.

도시가로망 개설사업

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로개설 13지구, L=11.1㎞

◦ 총사업비 : 71,250백만원 (2018 : 17,036백만원)

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2021(15개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2018	2019이후(국비)	비고
계	13지구 (L=11.1km)	71,250	21,314	17,036	29,150(3,750)
대 로	3지구 (L=4.80km)	48,000	13,900	8,250	22,100(3,750)
중 로	5지구 (L=2.65km)	16,450	5,614	6,286	4,650 ( - )
소 로	5지구 (L=3.65km)	6,800	1,900	2,500	2,400 ( - )

□ 추진실적

◦ 공사중(11지구) : 교룡대로, 신정대로, 지리산IC 진입도로, 용성중로, 용정마을 앞 중로, 노암산단 연결도로, 새터중로, 고산길(2지구), 동충5통 소로, 운봉로, 호치길

◦ 설계중(1지구) : 금동8통

◦ 보상중(1지구) : 원광한의원 옆 소로

□ 금후계획

◦ 완공 대상 (7지구 L=4.24km) / 7,286백만원

- 교룡대로(2구간), 용성중로, 노암산업단지 연결도로, 원광한의원 옆 소로,        동충5통 소로, 고산길(2지구), 운봉로

◦ 계속 시행 (6지구 L=6.7km) / 10,750백만원

- 교룡대로(1구간), 신정대로, 지리산IC 진입도로, 새터중로, 용정마을 앞        중로, 호치길

◦ 보상 및 설계(1지구 L=0.16km) / 500백만원

- 금동8통 소로

2018년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

○ 총       괄 : 16개지구 / L=12.9㎞ / 총사업비 747억원(‘18년 193.3억원)

○ 도시가로망 : 13개지구 / L=11.1㎞ / 총사업비 712.5억원(‘18년 170.3억원)

○ 인도정비 :  3개지구 / L= 1.8㎞ / 총사업비  34.5억원(‘18년  23.0억원)

(단위:백만원)

구분	사 업 명	위치	사업량	총 사업비	‘16년 까지	‘17년 (총사업비)	‘18년	‘19년 이후 (국비)	‘18년 추진계획	비 고 (사업기간)
계			16개지구 L=12,902m	74,700	7,050	15,414 (21,800)	19,336	29,150 (3,750)
대로	소 계		3개지구 L=4,800m	48,000	5,500	8,400	8,250	22,100 (3,750)
	신정 대로	향교	L=1,500m B=25~35m	18,000	1,500	1,000	3,000	12,500	공사시행	‘15~’21
	교룡 대로	향교	L=1,300m B=25~35m	18,000	4,000	7,000	3,250	(3,750)	공사시행	‘14~’20
	지리산 IC 진입도로	아영,인월	L=2,000m B=25m	12,000	-	400	2,000	9,600	공사시행	‘17~’21
중로	소 계		5개지구 L=2,650m	16,450	1,500	4,014	6,286	4,650
	용성 중로	도통 월락	L=1,150m B=20m	6,000	1,000	2,500	2,500	-	공사완공	‘16~’19
	용정마을 앞 중로 (2지구)	향교	L=300m B=20m	1,750	-	400	800	550	공사시행	‘17~’19
	노암산업단지 연결도로	노암동	L=700m B=15m	2,700	500	914	1,286	-	공사완공	‘17~’18
	새터 중로	조산,신정	L=400m B=20m	5,500	-	200	1,200	4,100	공사시행	‘17~’21
	운봉로 개설	운봉	L=100m B=12m	500	-	-	500	-	공사완공	‘18
소로	소 계		5개지구 L=3,652m	6,800	-	1,900	2,500	2,400
	고산길 도로정비 (2지구)	고죽	L=1,600m B=8m	1,900	-	1,200	700	-	공사완공	‘17~’18
	원광한의원 옆 소로	왕정	L=100m B=8m	700	-	300	400	-	공사완공	‘17~’18
	동충5통 소로	동충	L=87m B=8m	800	-	400	400	-	공사완공	‘17~’18
	호치길 도로정비	광치	L=1,700m B=8m	1,900	-	-	500	1,400	실시설계 용지보상	‘18~’19
	금동8통 소로	조산	L=165m B=6m	1,500	-	-	500	1,000	실시설계 용지보상	‘18~’19
인도정비	소 계		3개지구 L=1,800m	3,450	50	1,100	2,300	-
	롯데마트 ~의료원간	도통	L=600m B=5m	1,950	50	1,100	800	-	공사완공	‘16~’18
	운봉시가지 지중화공사	운봉	L=730m B=2.0m	700	-	-	700	-	공사완공	‘18
	향단로,용성로 안전한 보행환경	죽항	L=470m B=1.5m	800	-	-	800	-	공사완공	‘18

도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(남원향교 일원)

◦ 사업내용 : 마을입구 회전교차로, 유휴부지 활용사업(주차장 3, 소공원 1)

안전한 통학로 정비사업, 주민역량강화(전통문화 프로그램 운영)

◦ 총사업비 : 3,584백만원(균특 50%, 시비 50%)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020(4개년)

(단위:백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	비 고
계	3,584	400	672	1,004	1,508
균 특	1,792	200	336	502	754
시 비	1,792	200	336	502	754

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 완료                         : 2018. 2.

◦ 원가심사 완료(도)                                 : 2018. 3. 21.

◦ 편입토지 용지보상 협의 추진(보상률 78.6%)         : 2018. 4. ~

◦ 1차분 공사 착공(공정률 5% / (유)태경 고창순 소재)        : 2018. 5. 9.

□ 쟁점 및 대책

◦ 축천교 앞 회전교차에 편입된 건물 내 거주자 이전 지연

※ 편입토지 및 건물 보상 협의 완료(2018. 6. 19.)

□ 이주 지연 관련 공사 공정 차질 우려되어, 주차장․만인의총 인도 등

작업가능 공정 우선 시행

□ 공사 및 용지보상 필요예산 추경 시 시비 부담금 300백만원 선확보로 공사 추진

□ 금후계획

◦ 용지보상 협의 추진                                : 2018. 7. ~

◦ 1차분 공사 준공(마을 주차장, 만인의총 인도)         : 2018. 11.

남원 도시재생사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항․금동 일원(원도심 지역 : A=1.12㎢)

◦ 사업내용 : 춘몽․향단로 정비, 예루원(소공원)조성, 놀다街(문화골목투어),

도시재생대학, 주민 공모사업, 사랑나눔(마을카페․공방) 등

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년(6개년)

◦ 사 업 비 : 10,200백만원(지특 5,000, 도비 1,000, 시비 4,200)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019이후	비 고
계	10,200	436	870	2,694	6,200
지 특	5,000	118	435	1,347	3,100
도 비	1,000	24	87	269	620
시 비	4,200	94	348	1,078	2,480

□ 추진실적

◦ 제4기 도시재생대학 추진(수료자 : 47명)            : 2018. 1. ~ 4.

◦ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 착수    : 2018. 2. 7.

◦ 사랑나눔(마을카페․공방) 사업 선정(빈점포 활용 리모델링) / 4개팀    : 2018. 4.

◦ 주민 공모사업(5백만원 범위 / 1개팀)               : 2018. 4.

◦ 구군청 지하 주민 문화공간 리모델링 공사 착공     : 2018. 6.

□ 쟁점 및 대책

◦ 춘몽․향단로 정비공사 명품 테마거리 조성을 위해 타지역 사례 등 다양한

자료 수집을 통해 기본 구상(안) 마련

□ 금후계획

◦ 제5기 도시재생대학 운영                          : 2018. 7. ~ 10.

◦ 하반기 주민 주도사업 공모 사업 추진              : 2018. 7. ~ 12.

- 주민 공모사업, 사랑나눔(마을카페․공방), 도시재생 한마당 행사 등

◦ 향단로 정비 공사 발주                            : 2018. 8.

◦ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 완료    : 2018. 11.

- 중간 보고회 : 7월 / 최종 보고회 : 11월

남원 사매 일반산업단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위치 / 면적 : 사매면 월평리 산37-3번지 일원 / A=777천㎡

- 토지이용계획 : 777천㎡(산업시설 588, 지원시설 6, 공공시설 183)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 주요유치업종 : 금속, 음료식품, 전자, 전기장비, 자동차부품 등

◦ 총사업비 : 640억원(시비 630, 특별교부세 10)

◘ 연도별 투자계획                                             (단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2017	2018	2019	2020이후	비고
총 계	640	222	100	90	100	128
공 사	345		90	86	98	71	폐수처리부담액 (48억원)포함
보 상	188	185	1	2
용 역	45	32	4	1	1	7
기 타	62	5	5	1	1	50

□ 추진실적

◦ 산업단지계획 승인 고시(전북도)	: 2015. 5. 1.

◦ 공사 착공[민경건설(주)](공정률 : 30%)	: 2017. 3. 29.

◦ 2차분 착공	: 2018. 4. 23.

◦ 1차분 준공(토공 2,159천㎥, 우수공 1.9㎞)	: 2018. 5. 25.

◦ 매장문화재 정밀발굴조사용역 완료	: 2018. 6. 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 보상 완료된 지장물 미철거에 따른 토공작업 지연

□ 지장물 소유자 개별 면담을 통한 조속한 철거 요청

□ 금후계획

◦ 공사 추진(2차분)                                              : 2018. 4. ~ 2019. 5.

- 토공 854천㎥, 우수공 1.6㎞, 상수도공 4.5㎞ 등

남원 일반산업단지 국고지원사업

[진입도로, 공업용수도, 공공폐수처리시설]

□ 개    요

◦ 사업별 상세조서                                       (단위 : 억원)

구 분	총 계	진입도로	공업용수도	공공폐수처리시설	비고
총사업비	338	146	80	112
사 업 량	-	L=2.1㎞(B=19~22m) 북측 0.9㎞, 남측 1.2㎞	관로 L=16㎞(D350㎜) 배수관 5.7㎞, 송수관10.3㎞ 배수지(2,000㎥) 1식	연계처리관로 L=9.5㎞ (신설 7.2㎞, 개량 2.5㎞) 전처리시설 1개소 중개펌프장 7개소
사업기간	-	2016~2019년	2017~2020년	2018~2020년
진행과정	-	2차분 준공 (공정률 90%)	1차분 착공 (2018.6.26.)	실시설계 예정

◦ 연도별 투자계획                                       (단위 : 억원)

구 분	총계	기투자	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21이후	비 고
총 계	338	72	55	36	64	55	56
진입도로(국비)	146	72	51	13	10
공업용수도(국비)	80		4	18	29	29
공공폐처리시설(국비)	112			5	25	26	56

□ 추진실적

◦ 진입도로

- 2차분 준공	: 2018. 3. 30.

- 3차분 착공	: 2018. 4. 16.

◦ 공업용수도

- 기본 및 실시설계용역 준공	: 2018. 5. 05.

- 1차분 착공	: 2018. 6. 26.

◦ 공공폐수처리시설

- 공공하수처리장 폐수연계처리 검토보고	: 2018. 2. 14.

- 남원 일반산단 폐수연계처리 타당성조사 용역 착수   : 2018. 4. 12.

- 산업단지 개발계획 변경 및 환경보전방안 용역 착수  : 2018. 6. 07.

□ 쟁점 및 대책

◦ 산업단지 폐수 연계처리 타당성 조사 용역 시행중

□ 폐수 처리방식 변경[자체처리(160억원)→연계처리(98억원)] 검토중

□ 금후계획

◦ 진입도로 개설사업 추진(최종분)	: 2018. 4. ~ 2019. 6.

◦ 공업용수도 건설사업 추진	: 2018. 6. ~ 2020. 6.

◦ 공공폐수처리시설 설치사업 실시설계용역 추진          : 2018. 8. ~ 2019. 1.

공원 조성 및 유지관리

□ 개    요

사업명	위 치	사업량	사업비 (백만원)	사업내용	비 고
계			4,748
도시공원 사유지 매입	금암공원 월락공원	금암 19천㎡ 월락 60천㎡	3,000	장기미집행시설(공원) 사유지 매입 추진	금암 1,000 월락 2,000
중앙공원 조성사업	동충동 197-1	41,247㎡	460	기본계획 및 실시설계 문화재 시굴조사	기본 및 실시설계 310 시굴조사 150
금암공원 조성사업	노암동 566-1	40,000㎡	300	기본계획 및 실시설계
어린이공원 리모델링	도통동 일원	3개소	900	물놀이터 조성 (1개소) 노후시설 재정비 (2개소)	신규 700 재정비 200
도시공원 유지관리	관내 일원	25개소	88	조경지 예초,제초 시설물 유지관리	근린(11)소공원 (2) 어린이 (12)

□ 추진실적

◦ 도시공원 사유지 매입 추진	: 2018. 1. ~

- 금암공원 : 3,394㎡ / 453백만원

- 월락공원 : 분할측량 및 보상계획 열람공고

◦ 중앙 및 금암공원 기본계획수립 용역 시행	: 2018. 3. 20. ~ 2019. 1. 13.

- 전북대학교 산학협력단(*용역비 173백만원)

◦ 어린이공원 리모델링공사 시행	: 2018. 1. ~ 6.

- 도통6호 워터파크 조성(6.6억) / 도통3,7호 노후시설 재정비(1.9억)

◦ 도시공원 조경지 및 시설물 유지․관리	: 2018. 1. ~

□ 쟁점 및 대책

◦ 도시공원 사유지 매입 추진중 월락공원은 입지적 요인 등 지가 상승분을 감정평가시 보상 반영하기 어려우며, 종중 등의 반대로 매입추진 지난

- 월락공원은 도시계획시설 재정비시 공원구역 해제 검토, 향교공원 매입 실시

□ 금후계획

◦ 도시공원 사유지 매입 지속 추진	: 2018. 7. ~ 12.

◦ 중앙 및 금암공원 기본계획수립 용역 실시(보고회,공청회 등)  : 2018. 7. ~

◦ 어린이공원 워터파크 운영 및 관리	: 2018. 7. ~ 9.

◦ 도시공원 조경지 및 시설물 유지․관리(예초,제초,시설물 관리)  : 연중

□ 시정질문 추진상황

질문일자 : 2017. 9. 27. (제217회)		질문의원 : 김승곤 의원
질문내용	구역사 부지 활용계획
◦ 구역사 부지 매입에 따른 우리시 장기 활용계획은? ◦ 구역사 본 건물을 역사박물관으로 추진할 계획이 있는지? ◦ 구역사 건물을 축으로 주변 지역에 대한 향후계획은?
답변내용
◦ 구역사부지에 남원읍성 복원․정비와 더불어 정유재란과 관련된 남원읍성 역사기념관 건립 등 활용방안을 위해 중앙공원 조성을 위한 기본계획 수립용역 시행중에 있음 - 중앙공원 기본계획수립 용역 시행 :‘18. 3. 20. ~‘19. 1. 13.
추진상황
◦ 사업개요 - 위 치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원 - 사업규모 : 51,300㎡ (중앙공원 41,247㎡, 남원읍성 복원지 10,053㎡) - 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5년간) - 총사업비 : 141억원(국비 38, 시비 103) ※ 부지매입비 98, 기본계획수립 및 실시설계 3, 문화재시굴조사 2, 사업시행 38 ◦ 중앙공원 조성 기본계획수립 용역시행 - 대상공원 : 중앙공원(※금암공원 포함) - 규 모 : 81,247㎡(중앙 41,247㎡, 금암 40,000㎡) - 용 역 비 : 173백만원 - 용역시행 : 전북대학교 산학협력단 대표 이철로 - 용역기간 : 2018. 3. 20 ~ 2019. 1. 13.

질문일자 : 2017. 11. 24. (제218회)		질문의원 : 양해석 의원
질문내용	공공기관 이전에 따른 대책
◦ 남원세무서와 남원지원·지청의 이전에 따른 향후 그 주변지역 개발에 대한 특별한 대책 및 계획은? ◦ 위 공공기관의 시설물과 부지의 향후 이용에 대하여 기관 관계자들과 논의하였는지? ◦ 위 기관 관계자들에게 현재의 위치에서 주변 부지를 확충하여 증·개축 등의 방법으로 유지해 줄 것을 건의할 의사가 있는지?
답변내용
◦ 현재 남원지원·지청 이전과 관련해서는 구체적 예산 투입 계획이 수립 되지 않은 상태임. - 이전 청사 건축 계획과 기존 건축물 처리계획 등이 구체적으로 논의 되어야 할 사항임. ◦ 해당 지역들은 일반상업지역 및 일반주거지역으로 지정되어 있어 주변 사업 등을 고려하여 다양한 활용 방안을 마련할 것임.
추진상황
◦ 남원세무서의 경우 향기원부지 북측 한국철도공사부지를 매입하고 건축 인·허가를 득한 사항임. ◦ 남원지원‧지청 이전과 관련하여서는 2017. 12월 지원이전에 대하여 관계자 회의를 개최하였으며 한국토지주택공사에서 추진하는 구암지구 도시 개발사업구역으로 이전을 확정한 사항으로 토지이용계획안에 반영한 사항임. ◦ 현 지원∙지청부지의 활용방안에 대하여는 지속적으로 관련기관과 협의 하여 상생방안을 마련하고 구도심 활성화 방안을 도출하여야 할 사항임. ※ 현 남원지원‧지청 현황 - 위치 : 남원시 동충동 136, 141 - 용도지역 : 일반상업지역, 제2종일반주거지역 - 면적 : 9,136㎡

질문일자 : 2017. 11. 24. (제218회)		질문의원 : 양해석 의원
질문내용	구 남원역사 부지의 활용방안
◦ 구 남원역사 부지의 개발계획 및 활용방안 ◦ 구 남원역사 부지의 공원시설용도 폐지 및 용도 재지정에 대한 견해와 계획
답변내용
◦ 구역사부지에 남원읍성 복원․정비와 더불어 정유재란과 관련된 남원읍성 역사기념관 건립 등 활용방안을 위해 중앙공원 조성을 위한 기본계획 수립 용역 시행중에 있음. - 중앙공원 기본계획수립 용역 시행 :‘18.3.20~‘19.1.13.
추진상황
◦ 사업개요 - 위 치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원 - 사업규모 : 51,300㎡ (중앙공원 41,247㎡, 남원읍성 복원지 10,053㎡) - 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5년간) - 총사업비 : 141억원(국비 38, 시비 103) ※ 부지매입비 98, 기본계획수립 및 실시설계 3, 문화재시굴조사 2, 사업시행 38 ◦ 중앙공원 조성 기본계획수립 용역시행 - 대상공원 : 중앙공원(※금암공원 포함) - 규 모 : 81,247㎡(중앙 41,247㎡, 금암 40,000㎡) - 용 역 비 : 173백만원 - 용역시행 : 전북대학교 산학협력단 대표 이철로 - 용역기간 : 2018. 3. 20 ~ 2019. 1. 13.

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2018. 1. 12. (제219회)		발언의원 : 박문화 의원
발언내용	구 남원역 활용방안
◦ 구 남원역 활용방안
추진상황
다음과 같이 중앙공원 조성을 위해 기본계획수립 용역 등 사업을 추진할 계획임. ◦ 사업개요 - 위 치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원 - 사업규모 : 51,300㎡ (중앙공원 41,247㎡, 남원읍성 복원지 10,053㎡) - 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5년간) - 총사업비 : 141억원(국비 38, 시비 103) ※ 부지매입비 98, 기본계획수립 및 실시설계 3, 문화재시굴조사 2, 사업시행 38 ◦ 추진상황 - 도시계획 시설결정(근린공원) :‘ 00. 12월 - 부지매입 완료(한국철도공사→남원시) :‘17. 6월 ※ 동충동 197-1외 4필지 38,652㎡ / 98억 - 중앙공원 조성사업을 위한 추진계획 수립 :‘17. 10월 - 기본(공원조성)계획수립 용역시행 :‘18. 3 ~‘19. 1월 ◦ 금후계획 - 기본(공원조성)계획을 토대로한 실시설계 및 제반용역 시행 :‘18. 12월 ※ 제반용역 : 문화재시굴조사, 교통성평가, 사전재해 영향성 검토, 환경영향평가 - 중앙공원 조성사업 시행 :‘19 ~‘21년

발언일자 : 2018. 1. 12. (제219회)

발언의원 : 양희재 의원

발언내용

원도심 활성화를 위한 쾌적한 보행환경 조성 필요

◦ 구 정화극장 사거리에서 성한약방까지(향단로) 인도 설치

◦ 위생약국~남원예촌 북문(광한서로) 인도 설치

추진상황

◦ 사업현황

․ 총 사업대상 16개지구 L=6.6km / 442억원

- 기시행 :  7개지구  L=3.4km / 140억원(2007~2017)

- 시행중 :  1개지구  L=0.6km /  20억원(2017~2018)

- 미시행 :  8개지구  L=2.6km / 282억원(2018 ~ )

◦ 추진계획

번호	위치		사 업 량	사업비(억원)			비 고
				총사업비	한전	시비
합 계 (8개지구)			L=3,251m	302	141	161
①	용성로	서문5가 ∼ 용성초3가	L=181m, B=1.5m(양측)	8	4	4	2018년
②	충정로	롯데마트~ 의료원	L=600m B=2.0m(양측)	20		20	2018년
③	향단로	삽다리4가 ∼ 요천로	L=310m, B=1.5m(양측)	36	18	18	2018년
④	광한서로	용성초3가∼ 금정3가	L=300m, B=1.2m(양측)	62	31	31	2019이후
⑤	광한서로	금정3가 ∼ 광한북로	L=220m, B=1.2m(양측)
⑥	용성로	동문4가 ∼ 동림4가	L=400m, B=1.2m(양측)	54	27	27	2019이후
⑦	용성로	동림4가 ∼ 선원사4가	L=300m, B=1.2m(양측)
⑧	동문로	향교5가 ∼ 동문4가	L=640m, B=1.2m(양측)	122	61	61	2019이후
⑨	동문로	동문4가 ∼ 쌍교성당	L=300m, B=1.2m(양측)

- 사업대상지구 중 인근 상가들의 동의가 완료되는 지구를 우선적으로 사업추진 예정

발언일자 : 2018. 3. 21. (제220회)		발언의원 : 한명숙 의원
발언내용	지역의 특성에 맞는 구도심 활성화(도시재생)사업 추진
◦ 광한루원, 예촌, 요천 등의 역사적․문화적 자원을 적극적으로 활용하여 우리 지역에 맞는 특화된 사업 추진 ◦ 주민들이 공감하고 체감 할 수 있는 사업 추진
추진상황
◦ 사업개요 - 위 치 : 동충․죽항․금동 일원 - 사업내용 : 춘몽․향단로 거리 정비, 놀다街(문화골목투어), 북문예술인촌, 도시재생대학, 주민 공모사업, 게스트하우스 운영 지원, 현장지원센터, 청실홍실(전통혼례), 예루원(소공원), 마을카페․ 공방(창업지원) 등 - 총사업비 : 10,200백만원(국비 5,000, 도비 1,000, 시비 4,200) - 사업기간 : 2016 ~ 2020(5개년) ◦ 추진상황 - 주민 역량강화사업(주민주도사업) ․ 도시재생대학 운영(제1기 ~ 제4기/310명) : `16. 10. ~ `18. 4. ․ 주민 공모사업(팀당 5백만원/11개팀) 추진 : `17. 7. ~ ․ 마을카페․공방 공모사업 추진 : `18. 3. 26. ~ ※ 4개팀 / 팀당 30백만원 리모델링비․임대료 지원 - 기반시설사업(행정주도) ․ 문화공간(구군청 지하) 리모델링공사 착공 : `18. 6. 15. ․ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 착수 : `18. 2. ~ 11. - 기타 ․ 도시재생 모니터링 용역 : `18. 1. ~ `19. 1. ◦ 금후계획 - 마중물 사업(16개 사업) 추진 : `18. 7. ~ `20. 12.

2018. 7.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문 추진상황

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 2018 ~ 2019 도로 설해대책

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 시도 확포장

◦ 농어촌도로 확포장

◦ 통행불편 마을 진입로 정비

◦ 위험도로 선형 개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 람천 고향의 강 정비

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성

◦ 소하천 정비

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 하천 유지관리사업

◦ 요천 내 수경시설(분수)설치

□ 시정질문 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

												건 설 과 장
												남 정 식
건설행정담당										도로담당															하천담당
정 덕 량										윤 재 중															서 지 호
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속										읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지관리사업															치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	40	1	3	7	4	6	▪청원경찰 : 7 ▪공 무 직 : 12
현 원	36	1	3	7	5	3	▪청원경찰 : 5 ▪공 무 직 : 12 - 휴직(1) 포함
증 감	△4	-	-	-	1	△3	△2(청원경찰)

□ 도로 현황

(2017.12.31. 기준 / 단위 : km)

구 분	노선수	총연장	포 장	포장률(%)	비 고
계	841	1,387.7	754.1	54.3
고 속 국 도	2	69.0	69.0	100.0
국 도	5	123.8	123.8	100.0
국가지원지방도	2	47.7	47.7	100.0	전북 98.2%
지 방 도	7	120.2	107.0	89.0	전북 79.2%
시 도	472	174.4	95.4	54.7	전북 67.8%
읍면지역시도	22	215.1	130.6	60.7	전북 54.9%
농 어 촌 도	331	637.5	180.6	28.3	전북 34.3%

□ 하천 현황

(2017.12.31. 기준 / 단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	389	675.4	1,120.6	815.4	366.24	72.7
국가하천	2	39.1	40.1	40.1		100.0
지 방 하 천	40	246.7	392.9	317.4	75.54	80.8	전북 78.5%
소 하 천	347	389.6	687.6	457.9	290.7	66.6	전북 36.5%

2018년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 시민만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 신속하고 완벽한 제설작업으로 도로이용불편 최소화(20일) - 도로 갓길 및 주요하천 제방, 둔치길 제초작업 추진(3회) - 시정설명회 건의사항(29건) 적극 추진(완료 3건, 추진중 23건, 불가 3건) - 민원사항 즉시처리 및 시설정비예산 우선투자로 도로유지관리예산 상반기 전액집행 ·도로 재포장공사 및 교량유지보수 등 34개지구 3,814백만원 ◦ 시민편의를 위한 생활환경·관광 인프라 구축 - 건지갈계간(22억) 및 덕과고정마을 진입로(1억원) 공사 완공 - 자연이 숨 쉬는 생태하천 조성완료 ·광치천 생태하천 복원사업 (향교~용정 일원 / L=2.3㎞ / 19,666백만원) ·람천 고향의 강 정비사업 준공 (운봉 화수~행정/ L=5.3㎞ / 20,221백만원) ◦ 지방재정확충을 위한 국가예산확보에 총력 - 다산천 지방하천 정비사업 ‘18년 사업비 추가확보(국400 도160 시240백만원) - 사업타당성 재검토 요청 등 사업우선순위 반영 위해 적극대응 ※ 고속도로 휴게소 설치, 동부 내륙권 국도건설 외 3개 사업 - 신규사업 발굴을 통한 정책 의제화(새만금~지리산 고속국도 설치) ◦ 수경시설(분수) 벤치마킹을 통한 사업 공감대 형성 - 일 시 : ‘18. 2. 26 ~ 2. 28 (3일간) / 출장지 : 전남 광양서천, 김해 연지공원 - 시의회 의장 및 의원들과 함께 국내 타․시군 모범사례 벤치마킹을 실시하여 요천 경관과 조화로운 수경시설(분수) 설치사업에 대한 공감대 형성 ◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업 추진에 따른 공감대 형성 -‘18년 5월 3일 익산청 하천계획과장 현지 방문 점검 ※ 치수 안전성 확보를 위한 축제 및 보축, 낙차공 정비 등 실시설계 반영 - 요천(국가하천) 도통동 인도교 좌안 수변 생태 레저공원지구 하천구역 지정 애로 ※ 익산청에서 시행 중인「요천권역 하천기본계획」치수타당성 분석 결과 제방보축 또는 홍수관리구역 지정을 검토하고 있어 지속적인 대응 필요

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 18개 지구 / 7,250백만원

(18개지구 중 3개지구 완공) - 추진공정 45%

◦ 읍면지역시도 확포장 4개 지구	/ 4개 지구 추진(L=7.1km/1,800백만원)

◦ 농어촌도로 확포장   4개 지구	/ 1개 지구 완공(L=4.0km/2,700백만원)

◦ 통행불편 마을진입로  6개 지구	/ 1개 지구 완공(L=2.6km/1,350백만원)

◦ 위험도로 선형개량   4개 지구	/ 1개 지구 완공(L=1.8km/2,400백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 - 8개분야/102개소/5,239백만원

◦ 회전교차로 설치공사(노암4가) 추진	: 1개소  /  400백만원

◦ 남원대교~동림교 중앙분리대 외 1개소 준공	: 2개소  /  200백만원

◦ 고죽교차로~갈치교차로 정비공사 추진	: 1개소  /  600백만원

◦ 괴양교 재가설공사 추진	: 1개소  /  500백만원

◦ 인도 정비공사(시내권, 구룡교, 달궁 외) 추진	: 7개소  / 1,250백만원

◦ 도로·교량 유지관리사업	: 30개소 / 2,149백만원

◦ 도로시설물 정비(표지판, 방지턱 등)	: 60개소 /  140백만원

◦ 도로 제설작업(2017~2018)	: 20일(57개노선, 431.5㎞)

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 – 10개지구/11,626백만원

◦ 지방하천 정비	: 4개소 / 3,498백만원

◦ 람천 고향의 강 정비	: 1개소 /   477백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성	: 1개소 / 1,000백만원

◦ 소하천 정비	: 2개소 / 2,066백만원

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역	: 1식  /  1,137백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천, 기성제, 수경시설 등)	: 1식  /  3,448백만원

	하반기 추진방향
◦ 각종 민원허가 시 친절하고 신속한 민원처리로 시정에 대한 불만 해소 ◦ 다목적차량(2.5억)을 이용한 발빠른 민원처리로 쾌적한 도로환경 조성 ◦ 관내 주요 간선도로망 확충을 위한 국가예산확보 적극 대응 ◦ 하천정비사업을 통해 이·치수와 더불어 친수 공간 조성에 기여

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

2018~2019 도로 설해대책

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2018. 11. 15. ~ 2019. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 27명(도로보수원 11, 운전원 10, 기타 6)

◦ 제설 차량 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1〕

◦ 제설 장비 : 241대

- 자체 보유 : 제설기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

살포기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

-  읍면동(19) : 제설기 217대(트랙터용 214/ 1톤용 3)

◦ 제설 자재 : 염화칼슘 261톤 / 소금 2,104톤 / 친환경 제설제 112톤

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 6명), 각 읍면동사무소

□ 추진실적(2017~2018)

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재구입	: ‘17. 11.

◦ 도로제설작업 추진(20회)	: ‘17. 11. ~ ‘18. 3.

- 대설주의보 4회, 한파주의보 4회, 누적적설량 : 34.6㎝ (평균 4.9㎝)

- 투입장비 : 13대〔15톤 6(임차4), 5톤 1, 1톤 5(임차3), 굴삭기 1〕

□ 금후계획

◦ 제설장비 보관창고 구축으로 제설자재 적기공급 추진	:  9월 ~

- 제설장비 보관용 창고 신축(42.7㎡)

- 고랭지권 제설자재 보관창고 설치(90평)실시설계

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 운영의 애로사항 반영	: 10월

- 제설기 10대/ 원터치 47대 보급

◦ 미끄럼주의표지판(22개) 및 모래주머니(20,000매) 설치	: 10월 ~

◦ 임차장비 용역시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: 11월 ~

◦ 상황실[건설과(2개조 6명), 읍면동] 운영	: 11월 ~

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: ‘18. 4. ~ ‘19. 4.

- 상위계획 검토 및 실과소 자료 수집

- 교통량 조사 실시(25개소)

- 시군도 및 농어촌도로 각 노선별 현장조사(연장, 도로폭, 시설물 조사 등)

- 도시 교통 현황 분석 및 실태 조사(실과소 수집 자료와 현장 점검)

□ 금후계획

◦ 기본계획 변경 용역 중간보고	: ‘18. 7.

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: ‘18. 7. ~ ‘19. 4.

- 주요 도로 운영관리 체계 개선 방안 제시

(ex. 교육청사거리, 정령치구간, 인접시군과 연계 도로 구축 방안 등)

- 도로 현장 여건 변화 검토 및 수요 예측 조사

- 최적 도로망 체계 선정 및 연차적 투자계획 수립

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행	: ‘18. 9. ~ ‘19. 2.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: ‘19. 5.

□ 기대효과

◦ 급증하는 교통수요와 우리시 개발계획에 따른 여건 변화에 효율적이고 적극적으로 대처할 수 있는 중장기적인 도로계획을 수립

읍면지역 시도 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 18개 사업 / 34.5㎞ / 61,930백만원

◦ 기 투 자 : 14개 사업 / 27.4㎞ / 48,730백만원

◦ 2018시행 :  4개 사업 /  7.1㎞ /  1,800백만원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2021년(16개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합계	4개사업	7.1	15,400	2,200	1,800	11,400	26
화정~대율	사매면	1.1	2,400	1,800	600		100	‘16 ~ ‘18
부석~오촌	송동면	2.5	5,000	100	300	4,600	8	‘17 ~ ‘21
오리정~상신	사매면	1.0	2,000	100	300	1,600	20	‘17 ~ ‘20
평촌~강기	이백면	2.5	6,000	200	600	5,200	13	‘17 ~ ‘21

※ 전체 현황 : 22개 노선 / 215.1㎞중 130.6㎞ 완료(포장률 60.7%, 전북 54.9%)

□ 추진실적

◦ 화정~대율(2차분)	: 2차분 공사중(구조물공, 포장공) / 공정률 55%

◦ 부석~오촌	: 감정평가 및 관련기관 협의 중

◦ 오리정~상신	: 감정평가 및 관련기관 협의 중

◦ 평촌~강기	: 실시설계용역 중

□ 금후계획

◦ 화정~대율(3차분)	: 전체분 완공(아스콘 포장, 부대공) / ‘18. 12.

◦ 부석~오촌	: 토지보상 실시

◦ 오리정~상신	: 토지보상 실시

◦ 평촌~강기	: 실시설계용역 완료(`18. 7.), 토지보상 실시

농어촌도로 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 20개 사업 / 20.6㎞ / 368억원

◦ 기 투 자 : 15개 사업 / 14.5㎞ / 279억원

◦ 2018시행 :  4개 사업 /  3.9㎞ /  27억원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2021년(16개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합계	4개사업	3.95	8,100	2,700	2,700	2,700	67
건지~갈계	인월면 아영면	1.40	2,200	1,800	400		100	‘16 ~ ‘18
행 덕 선	운봉읍	1.25	1,600	300	800	500	69	‘17 ~ ‘19
장항교 재가설	산내면	0.30	2,800	500	1,300	1,000	64	‘17 ~ ‘19
도 용 선	주생면	1.00	1,500	100	200	1,200	20	‘17 ~ ‘20

※ 전체 현황 : 331개 노선 / 637.5㎞중 180.0㎞ 완료(포장률 28.2%, 전북 34.3%)

□ 추진실적

◦ 건지~갈계(2,3차분)	: 전체분 완공(`18. 6. 14.)

◦ 행 덕 선	: 토지보상 및 공사착공

◦ 장항교 재가설(1차분)	: 1차분 공사 준공(`18. 6. 18.) / 공정률 30%

◦ 도 용 선	: 실시설계용역 완료(`18. 5. 18.)

□ 금후계획

◦ 행 덕 선(1차분)	: 1차분 공사 추진(토공, 배수공, 구조물공)

◦ 장항교 재가설(2차분)	: 2차분 공사 추진(토공, 배수공, 구조물공, 교량공)

◦ 도 용 선	: 관련기관 협의 및 토지보상 실시

통행불편 마을 진입로 정비

□ 개    요

◦ 2018 시행 : 6개 사업 / 2.6㎞ / 1,350백만원

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합계	6개사업	2.64	4,550	200	1,350	3,100	86
신지마을	아영면	0.35	500	100	400		100	‘17 ~ ‘18
고정마을	덕과면	0.01	100		100		100	‘17 ~ ‘18
내황마을	보절면	0.80	1,600	100	300	1,300	25	‘17 ~ ‘19
계산마을	이백면	0.33	450		450		100	‘17 ~ ‘18
배산마을	덕과면	0.40	600		50	550	8	‘18 ~ ‘19
안대실마을	대산면	0.75	1,300		50	1,250	4	‘18 ~ ‘20

□ 추진실적

◦ 아영 신지마을 : 토지보상 실시

◦ 덕과 고정마을 : 공사 완공(`18. 6. 30.)

◦ 보절 내황마을 : 실시설계용역 완료(`18. 5. 18.)

◦ 이백 계산마을 : 감정평가 및 관련기관 협의 중

◦ 덕과 배산마을 : 실시설계용역 완료(`18. 6. 30.)

◦ 대산 안대실마을 : 실시설계용역 완료(`18. 6. 30.)

□ 금후계획

◦ 아영 신지마을 : 공사 완공(`18. 11.)

◦ 보절 내황마을 : 관련기관 협의 및 토지보상 실시, 1차분 발주(`18. 11.)

◦ 이백 계산마을 : 공사 완공(`18. 11.)

◦ 덕과 배산마을 : 토지보상 실시

◦ 대산 안대실마을 : 토지보상 실시

위험도로 선형 개선

□ 개    요

◦ 2018 시행 : 4개 사업 / 1.8㎞ / 1,400백만원

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합계	4개사업	1.80	2,400	550	1,400	450	86
군도5호선 (호곡)	수지면	0.30	400	100	300		100	‘17 ~ ‘18
농어촌도로 311호	주생면	0.30	500	100	400		100	‘17 ~ ‘18
척내선	이백면	0.55	600	300	300		100	‘17 ~ ‘18
군도29호선 (지리산IC ~아영면사무소)	아영면	0.65	900	50	400	450	50	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 군도 5호선(수지)	: 배수공, 포장공 시공중/ 공정률 85%

◦ 농어촌도로 311호(주생)	: 토지보상 및 공사착공

◦ 척 내 선(이백)	: 토공, 배수공, 구조물공 시공중 / 공정률 50%

◦ 군도 29호선(아영)	: 실시설계용역 완료(`18. 5. 8.)및 관련기관 협의 중

□ 금후계획

◦ 농어촌도로 311호(주생)	: 공사 완공(`18. 11.)

◦ 척 내 선(이백)	: 공사 완공(`18. 11.)

◦ 군도 29호선(아영)	: 토지보상 실시, 1차분 공사 추진(`18. 7. ~ 11.)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 5,239백만원(국비 41  도비 522  시비 4,676)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			38개 지구	5,239
	소 계		34개 지구	3,814
	도로유지관리	관내	법정도로 정비 L=429.66㎞	1,364	시100%
	읍면지역시도유지관리	관내	법정도로 정비 L=130.2㎞	1,000	시100%
	농어촌도로 유지관리	관내	법정도로 정비 L=179.6㎞	1,150	시100%
	교량(터널) 유지관리	관내	법정교량(터널) 정비 155개소	300	시100%
주천 용궁마을 스노멜팅 설치		주천면	도로 스노우멜팅 L=150m	181	국 41 시 140
노암4가 회전교차로 설치		노암동	회전교차로 설치 1식	400	도 200 시 200
산내 달궁마을 노후 인도정비		산내면	인도데크 설치 L=270m	800	도 300 시 500
남원대교~동림교 중앙분리대 설치공사		죽항동	화단형 중앙분리대 L=250m	44	도 22 시 22

□ 추진실적

◦ 통행불편 도로 유지관리사업 중점 추진	: ‘18. 1. ~ ‘18. 6.

- 안전한 보행환경 정비, 왕정동 서문1길 정비 등 34개지구 3,814백만원 투입

◦ 위험교량 정밀점검 및 유지관리사업 추진	: ‘18. 4. ~ ‘18. 6.

- 왕정교 외 2개교 정밀점검, 밤치육교 외 5개교 유지보수공사 추진

◦ 설계용역 추진(4개 지구)	: ‘17. 12. ~ ‘18. 12.

- 고죽교차로~갈치교차로,  산내 달궁 노후 인도정비, 용북중학교, 스노멜팅

□ 금후계획

◦ 실시설계용역완료 및 공사 완공(2개 지구)        : ‘18. 7. ~ 11.

- 고죽교차로~갈치교차로, 산내 달궁 노후 인도정비

◦ 공사 완공(4개 지구)	: ‘18. 7. ~ 11.

- 노암4가 회전교차로, 구룡교 인도개설, 괴양교 재가설, 대강 양촌마을 진입로

◦ 도로유지관리(18개 지구)	: ‘18. 7. ~ 12.

- 교량(터널) 유지관리, 안전시설물 등 정비, 노면 재포장, 배수 개선 등

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 22개지구 / 105.93㎞ / 224,463백만원

- 완료지구 : 11개지구 / 51.89㎞ /  96,924백만원

- `18년사업 : 4개하천 5개지구 / 3,498백만원 [국비 1,819, 도비 700, 시비 979]

◦ 위    치 : 도통동 갈치천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년 (11개년)

하 천 별	지 구 별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합 계	4개하천	13.55	59,422	21,403	3,498	34,521	42
갈치천	소 계	4.28	8,051	7,353	698	-	100	`12 ~ `18
	갈치지구	1.79	5,193	5,193	-	-	100	‘17년 준공
	식정지구	1.61	2,307	2,097	210	-	100	`16 ~ `18
	상갈치지구	0.88	551	63	488	-	100	`17 ~ `18
풍 천	소 계	5.53	37,351	12,050	1,000	24,301	35	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961	-	-	100	`17년 준공
	풍천지구	4.65	30,390	5,089	1,000	24,301	20	`18 ~ `22
송치천	송치지구	2.04	9,466	2,000	1,000	6,466	32	`16 ~ `20
다산천	다산지구	1.70	4,554	-	800	3,754	18	`18 ~ `22

□ 추진실적

◦ 갈치천 (식정) : 호안공 L=0.34㎞, 교량 1개소, 취입보 1개소	/ 공정률 95%

◦ 풍  천 (풍천) : 통합설계 및 설계적정성 검토 용역 착수	/ 공정률 40%

◦ 송치천 : 교량 1개소, 배수관 6개소, 개거 L=0.187㎞	/ 공정률 28%

◦ 다산천 : 실시설계용역 착수	/ 공정률 20%

□ 쟁점 및 대책

◦ 풍천 (인월·두락·의지지구) 통합설계에 따른 부산청 협의 및 전북도 지방건설기술심의 등 행정절차 이행으로 사업추진 애로

- 신속한 행정절차를 진행하기 위해 전북도, 부산청과 지속적인 협의 추진

□ 금후계획

◦ 갈치천 : 식정지구 전체분 공사 완료	: ‘18. 11.

◦ 풍  천 : 인월지구 편입용지 보상	: ‘17. 12. ~ 계속

통합설계 및 전북도 건설기술 심의	: ‘17. 12. ~ ‘18.  8

공사 추진	: ‘18.  9. ~ ‘22. 12

◦ 송치천 : 2차분 공사 완료	: ‘18. 11.

◦ 다산천 : 실시설계 완료 및 편입용지 보상	: ‘18. 12.

람천 고향의 강 정비

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 행정리 (삼산교) ~ 화수리 (국악의 성지 앞)

◦ 사 업 량 : 고향의 강 조성 L=5.3km

- 보축 L=5.6km, 호안공 L=5.54㎞, 교량 1개소, 인도교 2개소

- 낙차공 6개소, 취수보 2개소, 담수보 (가동보) 1개소, 취․배수공 35개소

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2018년 (9개년)

◦ 총사업비 : 20,221백만원〔국비 12,133(60%), 도비 4,044(20%), 시비 4,044(20%)〕

- `18년사업 : 1개 지구 / 477백만원 (국비 286, 도비 96, 시비 95)

지 구 별		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2018	2019이후
합계		4개지구	5.30	20,221	19,744	477	-	97
람천	화수지구	화수리	1.00	5,032	5,032	-	-	100	‘15년 준공
	신기지구	신기리	2.38	8,402	8,402	-	-	100	`17년 준공
	행정지구	행정리	1.92	6,054	6,054	-	-	100	`18년 준공
	호안정비지구	행정~화수	0.52	733	256	477	-	52	`17 ~ `18

□ 추진실적

◦ 행정지구	/ 전체공정률 100%

- 호안공 L=1.02km, 인도교 2개소, 낙차공 3개소, 취수보 1개소 완료

◦ 호안정비지구	/ 전체공정률  55%

- 호안공 L=0.22km, 제방포장 2.04km 완료

※ 총사업비 변경 승인 (부산청)	: `18.  5. 8

- 사업량 L=5.4㎞, 당초 M.P 21,122백만원 → 변경 20,221백만원 (감901)

□ 금후계획

◦ 호안정비지구(운봉읍 신기리) 공사 완료	: `18. 11월

원천천 하천정비 및 친수공간 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간조성 L=14.3㎞ (원천천 13.7㎞, 요천 0.6㎞)

- 하천환경 84.1천㎡, 자전거길 6.08㎞, 보축 2.13㎞, 교량 6개소 등

◦ 총사업비 : 20,510백만원〔국비 11,100(54%), 도비 3,764(18%), 시비 5,646(28%)〕

- 요  천 (국가하천 1.0km / 익산청)  :   1,689백만원(국비 100%)

- 원천천 (지방하천 14.6km / 우리시) : 18,821백만원(국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)

※ `18년도 사업비 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2020년 (5개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진 (총용역비 1,245백만원)	: ‘16.  9. 28 ~ ‘18.  2. 18

◦ 선진지 벤치마킹 (3개 시 4개 하천)	: ‘17.  5. 10 ~ 5. 12 (3일간)

- 11명 (안전경제건설위원회 의원 6명, 전문위원 외 4명)

◦ 문화재지표조사 및 환경영향평가용역 착수	: ‘17. 10. ~ ‘18. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 2 ․ 3차분 과업 중지	: ‘17. 12. / ‘18. 5.

- 요천권역 하천기본계획 수립 지연

◦ 기본 및 실시설계 (안) 확정	: ‘18.  5.  3

- 익산청 하천계획과 협의 완료 (현장 방문)

□ 쟁점 및 대책

◦ 요천 (국가하천 / 익산청 사업구간) 도통동 인도교 좌안 수변 생태 레저공원지구 하천구역 지정 애로

- 익산청에서 시행 중인「요천권역 하천기본계획」치수 타당성 분석 결과,   기설제방 보축 또는 홍수관리구역 지정을 검토하고 있어 지속적인 대응 필요

□ 금후계획

◦ 총사업비승인 협의절차 이행 (익산청 / 국토부)	: ‘18.  9월

◦ 환경영향평가서 초안 공람 및 주민설명회 개최	: ‘18.  9월

◦ 설계 적정성 검토, 기술자문, 건설심의 (전북도)	: ‘18.  9월 ~ 11월

◦ 공사발주 및 사업 추진	: ‘18. 11월

소하천 정비

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 : 6개지구 /  4.31㎞ / 13,417백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천)

- `18년사업 : 2개지구 / 2,066백만원〔국비 1,033 (50%), 시비 1,033 (50%)〕

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 1개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2022년 (7개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2018	2019이후
	합 계	2개하천	5.70	15,146	946	2,066	12,134	20
계속	고평천	수지 고평	2.30	7,745	946	1,746	5,053	35	`16 ~ `19
신규	당동천	아영 봉대	3.40	7,401	-	320	7,081	4	`18 ~ `22

□ 추진실적

◦ 고평천 : 1 ․ 2차분 준공	: `17.  5. 10 ~ `18.  4. 23

3차분 착공 (공정률 58%)               : `18.  2. 27 ~ `18. 12. 23

◦ 당동천 : 실시설계 용역 착수	: `18.  2. 21 ~  8. 19

소규모 환경영향평가 용역 착수	: `18.  6.  1 ~  9. 28

주민설명회 개최 완료	: `18.  6. 19

□ 금후계획

◦ 고평천 : 3차분 공사 완료	: `18. 11월

◦ 당동천 : 실시설계 협의 (전북도, 행정안전부)	: `18.  8월

편입용지 보상 추진	: `18. 10월

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소 (L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원 (시비 100%)

◦ 용역기간 : 2015 ~ 2018년 (4개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 분할 용역 발주 추진

- 섬진강 권역 :   272개소 /  292.4㎞

- 낙동강 권역 :    75개소 /   97.2㎞

- 전략환경평가 :  347개소 /  389.6㎞

(단 위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	기투자	2018	2019	용역기간
합 계	347개소/ L=389.6㎞	5,837	4,700	1,137	-	`15 ~ `18
섬진강 권역	272개소/ L=292.4㎞	3,572	2,700	872	-	‘15 ~ ‘18
낙동강 권역	75개소/ L=97.2㎞	1,315	1,050	265	-	‘16 ~ ‘18
전략환경평가	전구간	950	950	-	-	‘17 ~ ‘18

□ 추진실적

◦ 섬진강 권역 (1 ~ 4차분 완료)	/ 공정률  82%

◦ 낙동강 권역 (1 ~ 2차분 완료)	/ 공정률  76%

◦ 전략환경영향평가 추진	/ 공정률  44%

□ 쟁점 및 대책

◦ 소하천의 지정(신규·구간조정·폐지)에 따른 관계기관(농어촌공사, 농정과 등) 협의 지연

- 소하천 개소 변경 (당초 347개소→변경 256개소 / 감 91개소) 지정 추진

□ 금후계획

◦ 소하천의 조정 지정에 따른 전북도 자연재난과 협의	: ‘18.  7월

◦ 기초 소하천 관리위원회 심의	: ‘18.  8월

◦ 용역에 따른 자문회의 개최	: ‘18.  8월

◦ 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최	: ‘18.  9월

◦ 광역 소하천 관리위원회 심의	: ‘18. 10월

◦ 섬진강권역 5차분, 낙동강권역 3 ․ 4차분 완료	: ‘18. 12월

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =41.0km (하천정비 15.0㎞, 하도준설 20.0㎞ 등)

◦ 사 업 비 : 2,448백만원 (국비 920, 도비 48, 시비 1,480)

◦ 사업기간 : 2018년

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업 / L=41.0㎞	41.0	2,448
소하천 유지관리사업	소하천 유지관리	15.0	520	추진 중
	소하천 하도준설	20.0	640	″
	주민참여예산	3.7	272	″
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	96	″
국가하천 유지보수사업	국가하천 섬진강, 요천 유지관리	섬진강 21.0 요 천 17.9	920	″

□ 추진실적

【 소하천 및 기성제 유지관리사업 】

◦ 하천유지관리 사업 추진	: ‘18.  1. 26 ~ 6. 15

- 유지관리 완료 / 이백면 백암천외  8개소, L= 0.9km     : ‘18.  4.  3 ~ 8.  9

- 하도준설 완료 / 수지면 신평천외 22개소, L=11.5km	: ‘18.  1. 25 ~ 6. 19

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 섬진강 자전거길 볼라드 설치공사 외 3건 공사 완료	: ‘18. 4. 25 ~ 6. 20

□ 금후계획

【 소하천 및 기성제 유지관리사업  】※ 하천 준설 및 수목제거 중점추진

◦ 하반기 하천유지관리 대상지 조사 및 선정	: ‘18. 7 ~  8월

◦ 하반기 하천유지관리사업 추진	: ‘18. 7 ~ 12월

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 신규사업 익산청, 전북도 협의 추진	: ‘18. 6 ~  7월

- 섬진강 자전거길 낙석방지옹벽 설치공사 외 2건

◦ 섬진강‧요천 유지보수 공사 추진	: ‘18. 9 ~ 12월

소하천 유지관리사업 세부내역

□ 개    요

◦ 총사업비 : 1,432백만원(시비100%)

◦ 하천유지관리

사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비고 (공정률)
합 계(유지관리)	13개 지구	475
이백 백암천 유지관리	석축 L=28m	28	4.3~4.30	100%
산동 석동천 유지관리	석축 L=100m	41	4.9~5.23	100%
대산 독산천외1 유지관리	옹벽블럭 L=72m	66	4.5~5.19	100%
보절 뒤하천 유지관리	옹벽블럭 L=157m	61	4.9~5.23	100%
덕과 고정천 유지관리	석축 L=138m	56	4.16~5.31	100%
덕과 양선천 유지관리	옹벽블럭 L=107m	46	5.14~7.7	10%
도통 고죽천 제방 둑마루 정비	보조기층포설 L=136m	11	5.23~7.21	100%
산동 부동천 유지관리	옹벽블럭 L=34m 등	41	6.7~7.21	10%
아영 일대천(부동) 유지관리	옹벽블럭 L=41m 등	72	6.11~8.9	5%
요천 섶다리 긴급보수	섶다리 보수 1식	10	5.29~6.7	100%
요천 섶다리 철거	섶다리 철거 1식	12	6.17~7.17	100%
운봉 주촌천외 1지구 유지보수	옹벽블럭 L=29m 등	20	6.18~8.1	20%
아영 오산천 호안정비	호안블럭 L=33m	11	6.18~7.15	20%

◦ 하도준설

사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비고
합 계(하도준설)	23개지구, L=11.5km	275
수지 신평천 하도준설	L=500m, V=3,000㎥	8	2.28~3.7
수지 유암천 하도준설	L=250m, V=3,281㎥	8	2.28~3.7
덕과 사곡천 하도준설	L=130m, V=500㎥	2	3.2~3.12
덕과 다산천 하도준설	L=150m, V=2,363㎥	6	3.22~3.26
보절 괴양천 하도준설	L=1,000m, V=12,000㎥	26	3.15~4.10
산동 가말천 하도준설	L=500m, V=5,400㎥	15	3.26~4.5
보절 갑산천 하도준설	L=600m, V=5,625㎥	15	4.24~5.26
이백 백암천 하도준설	L=900m, V=14,815㎥	38	1.25~3.21
향교 광치천 하도준설	L=700m, V=11,375㎥	28	4.20~5.17
주생 옥율천 하도준설(1차)	L=500m, V=7,263㎥	19	3.30~4.23
주생 상동천 하도준설	L=300m, V=600㎥	2	4.1~4.11
주생 영천천 하도준설	L=800m, V=1,760㎥	6	3.30~4.23
금지 감동천 하도준설	L=500m, V=6,338㎥	17	3.12~4.11
금지 상동천 하도준설	L=500m, V=3,713㎥	10	3.12~4.23
금지 방촌천 하도준설	L=1,000m, V=9,900㎥	25	3.12~4.11
덕과 물재천 하도준설	L=200m, V=900㎥	3	5.15~5.31
덕과 용산천 하도준설	L=400m, V=3,640㎥	10	3.8~3.26
아영 청계천 하도준설	L=230m, V=1,495㎥	5	4.6~4.17
아영 인풍외천 하도준설	L=200m, V=270㎥	1	5.10~5.30
아영 풍천 하도준설	L=230m, V=1,328㎥	3	5.10~5.30
대산 옥율천 하도준설(2차)	L=1,000m, V=3,500㎥	9	6.1~6.15
향교 산곡천 하도준설	L=500m, V=3,625㎥	10	진행중
대강 방촌천 하도준설	L=400m, V=2,181㎥	9	6.4 ~ 6.19

요천 내 수경시설(분수) 설치

□ 개    요

◦ 위    치 : 쌍교동 요천 지내 / 국가하천

◦ 사 업 량 : 수경시설(음악분수 / 고정식) 및 조명․음향․분수 연출 1식

◦ 총사업비 : 7,000백만원 (시비)  - `18년 사업비 : 3,500백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년 (3개년)

□ 추진실적

◦ 선진지 벤치마킹(경남 양산천, 강원 양구서천)	: ‘17.  6. 22 ~ 23(2일간)

◦ 익산청 분수설치 사업계획 설명	: ‘17.  6. 28

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘17. 10. 24 ~

◦ 의회 선진지 벤치마킹(전남 광양서천, 김해 연지공원)	: ‘18.  2. 26 ~ 28(3일간)

□ 쟁점 및 대책

◦ 수경시설(분수) 설치를 위한 주요자재 및 시스템이 특허로 되어 있어, 개별 특허 반영 애로

- 수경시설 설치업체에 대한 특허 심의위원회 구성 반영 추진 (자재, 시스템 등)

- 특허 기술의 필요성, 경제성, 유사기술과의 비교검토 분석 추진

- 특허 선정의 투명성 제고를 위해 전문가 등 심의회 구성(대학교수, 시의원, 공무원 등)

□ 금후계획

◦ 수경시설 설치업체 특허공법 심의 및 선정	: ‘18.  7월

◦ 익산청 분수설치 사업계획 협의 (하천점용)	: ‘18.  8월

◦ 공사발주 및 추진 (`19년 춘향제 이전 완료)	: ‘18.  9월 ~ ‘19.  5월

□ 시정질문 추진상황

질문일자 : 2017. 9. 27. (제217회)		질문의원 : 김승곤 의원
질문내용	관광객 유치를 위한 대책
◦ 관광객 활성화 대책으로 광한루원 앞 요천에 수상 분수대 설치 요구
답변내용
◦ 관광객 유치와 시민들에게 문화·휴식공간 제공과 차별화된 볼거리 제공 - 수경시설(분수) 설치를 위한 기본 및 실시설계용역 추진 중 ◦ 실패사례를 겪지 않도록 사전 조사 및 국내 모범사례 벤치마킹 추진
추진상황
◦ 선진지 벤치마킹 (경남 양산천, 강원 양구서천) : ‘17. 6. 22. ~ 23. - 건설과장 외 2명 ◦ 익산청 분수설치 사업계획 설명 : ‘17. 6. 28. - 면담자 : 익산청 하천국장, 하천계획과장 외 1명 ◦ 시의회 선진지 벤치마킹(광양서천, 김해연지공원) : ‘18. 2. 26. ~ 28. ◦ 기본 및 실시설계용역 추진 : ‘17. 10월 ~ ‘18. 8월 - 수경시설 설치업체에 대한 특허공법 심의 및 선정 반영 추진