2018. 10.

2018년 주요업무 추진실적

도   시   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2018년 주 요 업 무  결산

□ 2018년 주요업무 추진실적

◦ 도시관리계획(일반주거지역세분 및 최고고도지구) 변경

◦ 2018년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

◦ 신정대로 개설사업

◦ 교룡대로 개설사업

◦ 지리산 I.C 진입도로 개설사업

◦ 용성중로 정비공사

◦ 용정마을 앞 중로 개설사업(2지구)

◦ 노암산업단지 연결도로 정비사업

◦ 새터중로 개설사업

◦ 통행 불편한 시가지 인도정비사업

◦ 시청로 정비사업

◦ 도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

◦ 남원 도시재생사업

◦ 남원 도시재생 뉴딜사업

◦ 남원 사매 일반산업단지 조성사업

◦ 남원 일반산업단지 국고지원사업

◦ 공원 조성 및 유지관리

일  반  현  황

□ 기    구

										도 시 과 장
										남 정 식
도시계획담당					도시정비담당						도시재생담당								산업용지조성담당						공원담당
차 남 희					소 명 호						안 용 운								서 지 호						김 형 준
◦도시기본, 관리 계획수립 ◦도시계획시설 결정및인가 ◦지구단위계획 수 립 ◦개발행위허가 ◦전문건설업관리					◦도시가로망 사업 시행 및 정비 ◦안전한 보행 환경조성 ◦전선 지중화 사업 ◦시가지 인도 정비사업						◦지역개발사업 ◦도시재생사업 ◦노암산업단지 연결도로 공사 ◦지역수요맞춤지원 공모사업 ◦온천개발 업무								◦일반산업단지 조성 ◦농공단지 지정 및 조성 ◦산업용지 보상 및 수용재결 ◦골프장 조성 지원						◦공원 녹지 기본계획 (변경) 수립 ◦공원 조성 사업 공사 감독 및 용지 보상 ◦공원 및 녹지점용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	5	8	6	2
현 원	21	1	6	6	5	3	공무직 1
증 감	△1	-	1	△2	△1	1

□ 도시관리계획

(2018. 9월 기준)                                                    (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.42 (36.7)	337.75 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2018. 9월 기준)                                                    (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.063 (0.21)	6.351 (20.72)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.06)	1.835 (5.99)	20.415 (66.61)	0.983 (3.21)
남 원	26.646 (100%)	0.063 (0.24)	5.355 (20.10)	0.016 (0.06)	0.784 (2.94)	0.020 (0.07)	1.835 (6.89)	18.573 (69.70)	-
운 봉	1.660 (100%)	-	0.505 (30.42)	-	0.093 (5.60)		-	0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.341 (100%)	-	0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)		-	1.142 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역 내 도시계획 도로

(2018. 9월 기준)                                                  (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	791	9,299	553	8,522	238	777	91.6
대 로	35	2,367	23	2,090	12	277	88.3
중 로	138	3,746	106	3,466	32	280	92.5
소 로	618	3,186	424	2,966	194	220	68.6

□ 건설업체 현황

(2018. 9월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
260	424	260	424	204	355	56	69	32	35

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 남원시 전체에 대한 도시관리계획을 재정비하여 토지이용 효율성 제고 ◦ 도시가로망 정비 및 확충으로 교통안전 및 생활편의 도모 ◦ 기업하기 좋은 남원 일반산업단지 본격 추진으로 지역발전 기반 구축

□ 2019년 국가예산 확보 : 6개 사업 /  115억원

◦ 북남원 I.C 남원 원도심 연결도로	/  20억원

◦ 도시활력 증진지역 개발사업	/  5.7억원

◦ 도시재생사업	/ 37.8억원

◦ 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치	/  20억원

◦ 일반산업단지 공업용수도 건설사업	/  29억원

◦ 중앙공원 조성사업	/  2.5억원

□ 도시관리체계 정비 시행

◦ 일반주거지역 세분 및 최고고도지구를 정비하여 불합리하고 토지이용 효율성이 떨어지는 사항에 대한 제고방안 검토 시행

◦ 자연취락 400여개소에 대하여 30~40호 이상 마을의 자연취락지구 지정 검토를 통해 비도시지역 토지이용의 효율성 제고

◦ 도시계획 조례 정비를 통하여 특정시설물(태양광발전시설)에 대한 기본 가이드라인 제시(자연경관 보호)

□ 기반시설 확충, 지역 접근성 개선과 주민편의 도모 / 22,525백만원

◦ 준  공 : 10개 지구(L=2,912m) / 5,567백만원

- 대로/2개 지구(교룡2구간, 롯데마트~의료원)  - 중로/1개 지구(충열사)

- 소로/7개 지구(봉당길, 서문길, 광석마을, 장승마을, 네마실1길, 동충5통, 인월서무소로)

◦ 공사중 : 12개 지구(L=10,410m) / 15,600백만원

- 대로/3개 지구(교룡1구간, 신정, 지리산IC)

- 중로/5개 지구(용성 중로, 용정마을 앞, 노암산업단지, 새터 중로, 인월서무)

- 소로/4개 지구(고산길, 운봉 서천1길, 원광한의원 옆, 호치길)

◦ 설계중 : 7개 지구(L=4,143m) / 1,358백만원

- 대로/1개 지구(시청로 정비)  - 중로/3개 지구(운봉시가지 지중화, 금암길, 만인로)

- 소로/3개 지구(금동8통, 노암2통, 서영환내과 옆)

□ 구도심권 활성화를 위한 도시재생사업 본격 추진

◦ 춘몽·향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 착수(`18. 3.)

◦ 제4기 도시재생대학 운영을 통한 주민 역량강화 활동(수료자 : 47명)

◦ 주민 협동조합 사회적 경제 활동 추진(예루원 트래블라운지)

⇒ 예루원 떡카페팀, 낭만춘향 한브랜드

◦ 빈집·빈점포를 활용한 창업 리모델링사업 공모 선정(4개팀)

⇒ 이색 김부각 생산·판매(2개팀), 복합문화공간(카페+공연),                 시민 사랑방(북카페·북스테이)

◦ 도시재생 주민 공모사업 추진(5개팀 : 상반기 1, 하반기 4)

□ 2019년 도시재생 뉴딜사업 공모 선정

◦ 위    치 : 동충·죽항동 일원(시외버스터미널 주변)

◦ 유    형 : 일반근린형

◦ 총사업비 : 142억원(국비 85, 도비 14, 시비 43)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4개년)

□ 일반산업단지 조성사업 내실 있는 단계적 추진 / 4개 사업 215억원

◦ 일반산단조성사업(2차분) 착공(`18. 4. 23) / 777천㎡, 170억원 / 공정률 35%

◦ 진입도로개설사업(3차분) 착공(`18. 4. 16) / L=2.1㎞, 20억원 / 공정률 90%

◦ 공업용수도건설사업(1차분) 착공(`18. 6. 26) / 관로(D350㎜) 16㎞, 배수지 2,000㎥ /18억원

◦ 폐수 연계처리 시설공사 실시설계용역 착수(`18. 7. 27) /  2,000㎥/일/ 7억원

□ 도시공원의 체계적 조성 및 관리

◦ 일몰제 대비 도시공원 사유지 매입 및 도시공원 내 시설물조사 추진

- 중앙공원 내 구)역전파출소 421㎡ 및 금암공원 4,338㎡ 매입(755백만원)

- 도시공원 내 시설물조사 : `18. 8. 27. ~ 9. 27.

◦ 어린이놀이터 개선을 위한 리모델링사업 추진

- 어린이놀이터 리모델링사업 : 도통3, 7호(5,273㎡/190백만원)

- 워터파크 조성 : 도통6호(2,557㎡/700백만원)

◦ 물방개 워터파크 개장 및 운영

- 운    영 : `18. 7. 16. ~ 9. 9.(37일간)

- 이용인원 : 약 13,000여명(지속적인 폭염 속 인기)

2018년 주요업무 추진실적

도시관리계획(일반주거지역세분 및

최고고도지구) 변경

□ 개    요

◦ 일반주거지역 세분

- 주거지역 대비 99%로 지정되어 관리되고 있는 제2종일반주거지역에        대하여 제1종, 제2종, 제3종으로 세분(제1종 : 제2종 비율 3 : 7)

◦ 최고고도지구 재검토

- 구 도심권의 발전 방향과 재건축을 앞둔 노후 아파트 단지에 대한 관리방안 마련 (문화재보호구역 주변지역 고도지구 해제)

◦ 자연취락지구 지정

- 비도시지역 내 자연마을(456개소) 대상 검토 지정(30~40호 이상 마을        우선지정 200개소)

◦ 성장관리방안 수립 및 장기미집행시설(근린공원 관리방안) 검토

◦ 사 업 비 : 464백만원

◦ 사업기간 : 2017. 12. ~ 2018. 12.

□ 추진실적

◦ 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행	: 2017. 12. 29.

◦ 도시관리계획 결정(변경)안 검토	: ~ 2018. 6.

- 도로 변경 5개소, 주차장 1개소 신설 추진

□ 쟁점 및 대책

◦ 일반주거지역 세분에 따른 종 하향(제2종⇒제1종) 시 주민 반대 우려

⇒ 주민 피해가 없는 범위 내 계획을 수립토록 하겠으며 문화재 보호          법에 따른 층수 제한 지역에 대하여 우선 검토 시행

□ 금후계획

◦ 계획 입안(안) 작성	: 2018. 10.

◦ 주민공람(관련부서 협의) 및 시의회 의견 청취	: 2018. 10. ~ 11.

◦ 시 도시계획위원회 자문·심의	: 2018. 11.

◦ 전북도 승인요청 및 도 도시계획위원회 심의	: 2018. 12.

◦ 도시관리계획 변경 사항 고시 및 지형도면 고시	: 2018. 12.

◦ 일반주거지역 현황

일반주거 지역면적 (㎢)	제1종일반주거지역		제2종일반주거지역		제3종일반주거지역
	면적(㎢)	구성비(%)	면적(㎢)	구성비(%)	면적(㎢)	구성비(%)
6.41	0.06	0.94	6.35	99.06	-	-

◦ 최고고도지구 현황

구분	계	3층이하	5층이하	8층이하	10층이하	15층이하
개소	44	7	9	18	7	3
면적(㎡)	4,132,000	683,000	1,100,000	1,591,000	521,000	237,000

◦ 자연취락지구 현황

구분	자연취락지구		비고
	면적(천㎡)	개소
전주시	3,305	156
군산시	2,035	62
익산시	2,735	83
정읍시	2,723	36
남원시	590	19
김제시	538	21

◦ 성장관리방안 수립

구분	내용
성장관리방안 시범수립	‣ 난개발이 예상되는 지역에 대한 관리방안 수립 ∙ 건폐율 완화 : 계획관리 40%⇒50%, 자연녹지/생산관리 20%⇒30% ‣ 수립예정지 : 조산동 보건소 일원 자연녹지지역 (512,000㎡) 검토 ∙ 장례식장, 도축장, 시장 등 각종 시설 입지 및 제2종일반주거지역이 산재된 지역으로 계획적 관리방안 필요

◦ 장기미집행시설 현황

구 분	결정		미집행			10년 이상 장기미집행
	시설수	면적(㎢)	시설수	면적(㎢)	사업비	시설수	면적(㎢)	사업비
계	1,103	40.82	257	4.34	1,794	238	3.1	1,499
도로	791	9.3	238	0.78	1,200	225	0.73	1,078
공원	32	3.15	9	1.88	185	9	1.88	185
녹지	47	0.28	-	-	-	-	-	-
기타	233	28.09	10	1.68	409	4	0.49	236

2018년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

○ 총      괄 : 21개지구 / L=15.8㎞ / 총사업비 983억원(‘18년 312억원)

○ 도시가로망 : 13개지구 / L=14.0㎞  / 총사업비 910억원(‘18년 275억원)

○ 인 도 정 비 :  3개지구 / L= 1.8㎞  / 총사업비   73억원(‘18년  37억원)

(단위:백만원)

구분	사 업 명	위치	사 업 량	총사업비	‘16년이전	‘17년	‘18년 (국비)	‘19년 이후 (국비)	‘18년 추진계획	비 고
계		21개소	L=15,800m	98,300	6,150	15,414	31,181 (250)	36,420 (8,350)		(사업기간)
대로	소 계	3개소	L=4,800m	50,500	4,600	8,400	15,035 (250)	11,400 (8,350)
	신정 대로	향교	L=1,500m B=25~35m	18,000	600	1,000	8,000	8,400	공사시행	‘15~’21
	교룡 대로	향교	L=1,300m B=25~35m	18,000	4,000	7,000	3,000 (250)	(3,750)	공사시행	‘14~’20
	지리산 IC 진입도로	아영,인월	L=2,000m B=25m	12,000	-	400	4,000	3,000 (4,600)	공사시행	‘17~’21
중로	소 계	7개소	L=4,150m	31,250	1,500	4,014	9,286	16,450
	용성 중로	도통 월락	L=1,150m B=20m	6,000	1,000	2,500	2,500	-	공사시행	‘16~’19
	용정마을 앞 중로 (2지구)	향교	L=300m B=20m	1,750	-	400	800	550	공사시행	‘17~’19
	노암산업단지 연결도로	노암	L=700m B=15m	2,700	500	914	1,286	-	공사시행	‘17~’19
	새터 중로	조산,신정	L=400m B=20m	5,500	-	200	3,700	1,600	공사시행	‘17~’20
	운봉로 개설	운봉	L=100m B=12m	500	-	-	500	-	예산반납	-
	금암길 중로	노암	L=750m B=15m	9,000	-	-	300	8,700	실시설계	‘18~’21
	만인로 중로	향교	L=750m B=15m	5,800	-	-	200	5,600	실시설계	‘18~’21
소로	소 계	7개소	L=4,300m	11,700	-	1,900	3,160	6,640
	고산길 도로정비 (2지구)	고죽	L=1,600m B=8m	1,900	-	1,200	700	-	공사시행	‘17~’19
	원광한의원 옆 소로	왕정	L=100m B=8m	700	-	300	400	-	공사완공	‘17~’18
	동충5통 소로	동충	L=87m B=8m	800	-	400	400	-	공사완공	‘17~’18
	호치길 도로정비	광치	L=1,700m B=8m	3,500	-	-	1,100	2,400	실시설계 용지보상	‘18~’19
	금동8통 소로	조산	L=165m B=6m	1,500	-	-	500	1,000	실시설계 용지보상	‘18~’19
	노암2통 소로	노암	L=360m B=6m	1,500	-	-	30	1,470	실시설계	‘18~’20
	서영환내과 옆 소로	동충	L=288m B=4m	1,800	-	-	30	1,770	실시설계	‘18~’20
인도정비	소 계	4개소	L=2,550m	7,350	50	1,100	3,735	2,465
	롯데마트 ~의료원간	도통	L=600m B=5m	1,950	50	1,100	800	-	공사완공	‘16~’18
	운봉시가지 지중화공사	운봉	L=730m B=2.0m	1,750	-	-	1,750	-	공사시행	‘18~’19
	향단로,용성로 안전한 보행환경	죽항	L=470m B=1.5m	1,150	-	-	1,150	-	공사시행	‘18~’19
	시청로정비	도통	L=750m	2,500	-	-	35	2,465	실시설계	‘18~’20

신정대로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동(금동아파트) ~ 신정동(국도17호선 신정교차로)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1.5km, B=25m, 교량 1개소

(1구간:신정교차로~어린이집 0.9km, 2구간:어린이집~금동APT 0.6km)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2021년(7개년)

◦ 사 업 비 : 18,000백만원(공사비 15,000백만원, 보상비 3,000백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	18,000	1,600	8,000	2,000	6,400
시 비	18,000	1,600	8,000	2,000	6,400

□ 추진실적

◦ 용지보상 추진	: 2001 / 2016 ~

- 72필지 25,783㎡ 중 57필지 22,937㎡ / 82%

◦ 국가지정 문화재(만복사지) 현상변경 허가 재심의(가결)	: 2016. 5. 11.

※ 문화재구역 밖으로 선형변경 심의 완료

◦ 도시관리계획 변경 추진(선형 변경 및 폭원 축소 등)	: 2016. 6. ~ 2017. 5.

◦ 실시설계 용역 시행(1구간 완료)	: 2017. 10. ~ 2018. 4.

◦ 1구간(신정교차로~어린이집) 공사 시행	: 2018. 6. ~ 2020. 12.

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입 토지 15필지 2,846㎡)  : 2018.  7. ~ 2018. 12.

◦ 2구간(어린이집~금동APT) 공사 발주 및 시행  : 2018. 10. ~ 2021. 12.

교룡대로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(의총로 3가 ~ 향교동 신협 ~ 시청로 3가)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1.3km, B=25~35m (대로1-10, 3-5호선)

(1구간:지적공사~신협 0.8km, 2구간:신협~시청3가 0.5km)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020년(6개년)

◦ 사 업 비 : 18,000백만원(공사비 7,000백만원, 보상비 11,000백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	18,000	11,000	3,250	2,000	1,750
균특(생활)	4,000	-	250	2,000	1,750
시 비	14,000	11,000	3,000	-	-

□ 추진실적

◦ 용지보상 추진 90필지 40,479㎡ 중 80필지 36,514㎡(94%)	: 2015. 1. ~ 2018. 9.

◦ 실시설계 용역 완료(1․2구간)	: 2017. 8. ~ 2018. 6.

◦ 한국철도공사 소유 부지 매각 협의 출장	: 2017. 8. 31.

◦ 2구간(신협~시청3가)공사 추진	: 2017. 12.~ 2018. 12.

◦ 1구간(지적공사~신협)공사 추진	: 2018. 6. ~ 2020. 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공사 편입 철도부지가 존재하여 매각 협의 요청 (시⟶한국철도공사)

- 한국철도공사 : 해당 부지는 제3차 국가철도망 구축계획에 포함되어                       있어 매각 어려우나 공공사업 부지 사용허가 가능

□ 당분간 공공사업 부지 사용허가를 득하여 사용

추후 철도 타당성 검토 및 기본계획 완료 후 매각협의 추진

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입 토지 3필지 3,339㎡)   : 2018. 7. ~ 2018. 12.

◦ 2구간(신협~시청3가) 공사 완료	: 2018. 12.

◦ 1구간(지적공사~신협) 1차분 공사 완료	: 2018. 12.

지리산 I.C 진입도로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면(지리산IC) ~ 인월면(인월 교차로)

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=2.0km, B=25m, 교량1개소(L=20m)

도시계획구간(L=900m), 비도시계획구간(L=1,100m)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

◦ 사 업 비 : 12,000백만원(공사비 10,000백만원, 보상비 2,000백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	12,000	400	4,000	2,000	5,600
시 비	7,400	400	4,000	2,000	1,000
국 비	4,600	-	-	-	4,600

□ 추진실적

◦ 중기지방재정계획 반영	: 2017.  9. 25.

◦ 지방투자심사완료	: 2017. 11. 16.

◦ 실시설계 용역 완료	: 2017. 11. 15. ~ 2018. 5.

◦ 용지보상 추진(총 38필지 9,011㎡중/ 25필지 5,475㎡ 완료(66%) : 2018.  5. ~

◦ 도시계획구간(L=0.9km) 1차분 공사 착수	: 2018.  6. 21.

	비도시계획구간 추진실적
◦ 한국도로공사(이하 도공) 전남지역 본부 도로개설 건의(도로팀) : 2018. 1. 17. ◦ 한국도로공사 본사 도로개설 방문건의 : 2018. 2. 7. / 5.10. ◦ 비도시지역 도로개설 건의 3회(시 → 도공) : 2018. 4월, 5월, 7월 ◦ 사업시행 어려움 회신(도공 ⟶ 시) : 2018. 8. 30. ◦ 사업시행 재건의(토지보상비 남원시 부담조건) (시 ⟶ 도공) : 2018. 9. 4.

□ 쟁점 및 대책

◦ 위 치 도

◦ 비도시계획구간 도로개설을 한국도로공사(이하 도공)에 수차 건의, 도공은 사업시행 어려움 회신 (도공 ⟶ 남원시)

- 비도시계획구간의 관리주체는 남원시이므로 도공에서 도로개설은 어려움

- 오히려, 지리산IC 앞에서 도로공사 업무차량 등이 비정상적 U턴을          하므로 교차로에서 U턴 차로 설치 건의 (도공 ⟶ 남원시)

□ 우리시가 토지보상비 부담하여 한국도로공사에서 남원시 건의안을 수용할 수 있도록 하고, 사업 지원 근거 마련

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입 토지 2필지 201㎡)	: 2018. 9. ~ 2018. 12.

◦ 1차분 공사 준공	: 2019. 6.

◦ 전체분 준공(도시계획구간)	: 2020. 6.

용성중로 정비공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 도통동(도통아파트 4가) ~ 월락동(월락주유소 3가)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1,150m, B=20m

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2019년(4개년)

◦ 사 업 비 : 6,000백만원(공사비 4,300백만원, 보상비 1,700백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	6,000	3,500	2,500	-	-
시 비	6,000	3,500	2,500	-	-

□ 추진실적

◦ 용지보상 추진	: 2016. 7. ~

- 토지 34필지 1,805㎡중/ 31필지 1,747㎡완료(98%)

◦ 실시설계 용역 완료	: 2017. 9. 1.

◦ 1차분 공사 완료	: 2017. 9. 29. ~ 2018. 6. 22.

◦ 2차분 공사 착공	: 2017. 12. 11.

◦ 3차분 공사 착공	: 2018. 5. 4.

□ 금후계획

◦ 설계변경 추진	: 2018. 9.

- 종점부(낙현삼거리) 회전교차로 설치 (328백만원)

◦ 전체분 공사 완료	: 2019. 6.

용정마을 앞 중로 개설사업(2지구)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(사직단 ~ 경찰서 옆)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=300m, B=20m

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2019년(3개년)

◦ 사 업 비 : 1,900백만원(공사비 1,080백만원, 보상비 820백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	1,900	400	800	700	-
시 비	1,900	400	800	700	-

□ 추진실적

◦ 1지구(선관위 ~ 사직단) 공사완료	: 2012. ~ 2016.

- 사업량 L=210m / 사업비 1,524백만원

◦ 실시설계 완료	: 2017. 10. ~ 2018. 2.

◦ 용지보상 추진(토지10필지 4,418㎡ 완료/100%)	: 2015.  3. ~ 2018. 5.

◦ 장기계속공사 1차분 착공	: 2018.  6. 27. ~

◦ 사직단 산지 법면 공법 검토 및 설계변경 추진	: 2018.  8.  2. ~

◦ 선진지 벤치마킹 출장 (영암군 열무정)	: 2018.  8.  3.

◦ 문화재청 현상 변경허가 변경신청(설계변경)  : 2018.  9.  1.

□ 쟁점 및 대책

◦ 당초 설계가 사직단 산지법면에 식생옹벽블럭 시공계획이었으나,

◦ 법면 상부에 중요 문화재인 사직단이 있고, 급경사(1:0.2)로 인한 불안감 조성, 사유지 침범, 특허공법 추진 어려움 등 여러 문제점 내포

□ 도로선형을 하천 둑마루로 이격하고 사직단 산지 사면 공법을 당초        식생옹벽블럭 ⟶ 변경 자연석쌓기로 변경하여 경사도를 완화시켜         문제점 해소 및 미적 제고

◦ 사직단 산지 사면공법 (당초 ⟶ 변경)

당 초	변 경

◦ 조 감 도

□ 금후계획

◦ 설계변경 및 1차분 공사 추진	: 2018. 9. ~ 10.

◦ 2차분 공사 추진	: 2019. 3.

◦ 전체분 준공	: 2019. 9.

노암산업단지 연결도로 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 송동면 장국리 일원(도시계획구간)

◦ 사업규모 : 도로 확․포장 L=700m, B=15m

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2018년(3개년)

◦ 사 업 비 : 2,700백만원(균특 257, 도비 900, 시비 1,543)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2017	2018	2019	비 고
계	2,700	500	914	1,236	-
균 특	257	-	257	-	-
도 비	900	500	400	-	-
시 비	1,543	-	257	1,236	-

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진                          : 2016. 11. ~ 2017. 04.

◦ 편입토지 및 지장물 보상 협의               : 2017. 06. 12. ~

- 7,354㎡ 55필지 중 5,817㎡ 36필지 완료(79.1%)

◦ 1차분 공사 착공(공정률 90%)                : 2017. 06. 26.

◦ 2차분 공사 착공(공정률 10%)                : 2018. 04. 20.

□ 금후계획

◦ 토지수용 재결 신청(19필지, 1,537㎡)         : 2018. 10.

◦ 농경지 진입 통로박스 설치                  : 2018. 10.

◦ 1차분 공사 준공                            : 2018. 11.

◦ L형측구 설치 및 도로포장                   : 2019. 04.

◦ 2차분 공사 준공                            : 2019. 05.

새터중로 개설사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동(새터마을) ~ 조산동(요천로)

◦ 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=400m, B=20m, 교량 1개소(L=70m)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 사 업 비 : 5,500백만원(공사비 5,134백만원, 보상비 366백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	5,500	200	3,700	1,000	600
시 비	5,500	200	3,700	1,000	600

□ 추진실적

◦ 중기 지방계획 반영	: 2017.  9. 25.

◦ 지방재정 투자심사 완료	: 2017. 11. 16.

◦ 실시설계 용역 완료	: 2018.  5. 21.

◦ 용지보상 추진	: 2018.  1. ~

- 토지 19필지 5,138㎡중/ 17필지 4,049㎡완료(89%)

◦ 장기계속공사 1차분 착공	: 2018.  6. 27. ~

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진(미 매입토지 2필지 1,089㎡)	: 2018.  9. ~ 12.

◦ 전기공사 추진	: 2019.  4.

◦ 1차분 공사 완료	: 2019. 12.

◦ 2차분 공사 추진	: 2019. 12.

◦ 전체분 준공	: 2020. 12.

통행 불편한 시가지 인도정비사업

□ 개    요

◦ 사업규모 : 보행자도로 인도설치 3지구, L=1.8㎞

◦ 총사업비 : 4,850백만원(2018 : 3,700백만원)

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2025년(10개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	위치	사 업 량	총사업비	기투자	2018	2019이후	비고
계	3지구	L=1,800m	4,850	1,150	3,700	-	(사업기간)
롯데마트~의료원간 인도정비	도통	L=600m B=5.0m	1,950	1,150	800	-	2016~2018
운봉시가지 지중화공사	운봉	L=730m B=2.0m	1,750	-	1,750	-	2019
향단로,용성로 안전한보행환경	죽항	L=470m B=1.5m	1,150	-	1,150	-	2019

□ 추진실적

▣ 롯데마트 ~ 의료원간 인도정비

◦ 1차분 준공	: 2017. 8. 8. ~ 2018. 5. 11.

◦ 2차분 착공	: 2018. 5. 10. ~ 10. 12.

▣ 운봉시가지 지중화 공사

◦ 지중화공사 협약 체결 및 부담(남원시↔한전)	: 2018. 6.  4.

◦ 운봉 시가지 지중화공사 분담금(500백만원) 1차 납부	: 2018. 6. 19.

◦ 운봉 시가지 지중화공사 주민설명회 개최	: 2018. 8. 29.

▣ 향단로, 용성로 안전한 보행환경 조성사업

◦ 지중화공사 실시설계(운봉로, 향단로, 용성로)	: 2018. 2. ~

◦ 지중화공사 협약 체결 및 부담(남원시↔한전)	: 2018. 6.  4.

□ 금후계획

◦ 롯데마트 ~ 의료원간 공사 완료	: 2018. 10.

◦ 지중화공사 실시설계(운봉로, 향단로, 용성로) 완료 : 2018. 11.

◦ 지중화공사(운봉로, 향단로, 용성로) 시행	: 2018. 10. ~ 2019. 6.

시청로 정비사업

□ 위 치 도

남원시청

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 (시청로)

◦ 사 업 량 : 지중화사업, 도로 및 인도정비 L=750m, B=35m

※ 도로다이어트 및 노상주차장 등 설치

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3개년)

◦ 사 업 비 : 2,500백만원(공사비 1,500백만원, 지중화 1,000백만원)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	2,500	-	35	2,465	-
시 비	2,500	-	35	2,465	-

□ 추진실적

◦ 시청로 교통 및 주차체계 개선 검토보고	: 2018. 7. 16.

◦ 기본계획 및 기본설계 일상감사 완료	: 2018. 8. 29.

◦ 기본계획 및 기본설계 용역 착수	: 2018. 9. 11.

□ 금후계획

◦ 기본계획 및 기본설계 용역 완료	: 2018. 12.

◦ 실시설계 및 공사 추진	: 2019. 3. ~ 2020. 12.

도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(남원향교 일원)

◦ 사업내용 : 마을입구 회전교차로, 유휴부지 활용사업(주차장 3, 소공원 1),                  안전한 통학로 정비사업, 주민역량강화(전통문화 프로그램 운영)

◦ 총사업비 : 3,584백만원(균특 50%, 시비 50%)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	비 고
계	3,584	400	672	1,132	1,380
균 특	1,792	200	336	566	690
시 비	1,792	200	336	566	690

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 완료                         : 2018. 2.

◦ 원가심사 완료(도)                                 : 2018. 3. 21.

◦ 편입토지 용지보상 협의 추진(보상률 78.6%)         : 2018. 4. ~

◦ 1차분 공사 착공(공정률 50% / (유)태경 고창순 소재)       : 2018. 5. 9.

□ 쟁점 및 대책

◦ 축천교 앞 회전교차에 편입된 건물 내 거주자 12월 내 이전 촉구

※ 편입토지 및 건물 보상 협의 완료(2018. 6. 19.), 2019 공사 착수(예정)

□ 금후계획

◦ 용지보상 협의 추진(향교건물 및 토지)               : 2018. 10. ~

◦ 1차분 공사 준공(마을 주차장, 만인의총 인도)         : 2018. 11.

◦ 2차분 공사 발주 준비                             : 2018. 12.

남원 도시재생사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항․금동 일원(원도심 지역 : A=1.12㎢)

◦ 사업내용 : 춘몽․향단로 정비, 예루원(소공원)조성, 놀다街(문화골목투어),

도시재생대학, 주민 공모사업, 사랑나눔(마을카페․공방) 등

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020년(6개년)

◦ 사 업 비 : 10,200백만원(균특 5,000, 도비 1,000, 시비 4,200)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	10,200	1,106	2,694	2,450	3,950
균 특	5,000	553	1,347	1,225	1,875
도 비	1,000	111	269	245	375
시 비	4,200	442	1,078	980	1,700

□ 추진실적

◦ 제4기 도시재생대학 추진(수료자 : 47명)            : 2018. 1. ~ 4.

◦ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 착수    : 2018. 2. 7.

◦ 사랑나눔(마을카페․공방) 사업 선정(빈점포 활용 리모델링) / 4개팀   : 2018. 4.

◦ 상반기 주민 공모사업(5백만원 범위 / 1개팀)        : 2018. 4.

◦ 구군청 지하 주민 문화공간 리모델링 공사 착공     : 2018. 6.

◦ 제5기 도시재생대학 운영                          : 2018. 7. ~ 10.

◦ 하반기 주민 공모사업(5백만원 범위 / 4개팀)        : 2018. 9.

□ 쟁점 및 대책

◦ 국민 문화공간 리모델링 사업지구 우수 유입에 따른 공간 활용 애로

- 강우 시 외부 지하로 스며든 우수가 벽면을 통해 용출되고 사업지대로        유입되어 국민문화 활동공간 활용 애로

□ 주민문화 활동공간 대체지 사업구역 내 검토 중

□ 금후계획

◦ 구군청 지하 주민문화 활동공간 리모델링 공사 마무리 추진  : 2018. 10.

◦ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 완료        : 2018. 11.

◦ 제5기 도시재생대학, 사랑나눔, 주민공모사업 보조금 정산 : 2018. 12.

남원 도시재생 뉴딜사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 거점플랫폼 조성, 용성로 정비, 숲정이 저잣거리 조성,

골목길 개선사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4개년)

◦ 사 업 비 : 14,167백만원(균특 8,500, 도비 1,417, 시비 4,250)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	14,167	-	-	4,250	9,917
균 특	8,500	-	-	2,550	5,950
도 비	1,417	-	-	425	992
시 비	4,250	-	-	1,275	2,975

□ 추진실적

◦ 도시재생 전략계획 승인(전북도) 공고                : 2016. 12. 02.

- 계획의 목표, 지역의 쇠퇴도 진단, 활성화 지역 지정(우선순위 등)

◦ 도시재생(뉴딜) 활성화계획 수립 용역 착수           : 2018. 03. 26.

- 수행업체 : 제이씨엔(주), 포스코A&C 건축사사무소

◦ 사업구상서 작성 및 도시재생대학 운영            : 2018. 04. ~ 11.

◦ 공모사업 신청(전북도)                              : 2018. 07. 06.

◦ 1차 서면평가 결과 통보                            : 2018. 07. 18.

◦ 발표평가 실시                                     : 2018. 08. 08.

◦ 공모선정 최종 발표                                : 2018. 08. 31.

□ 금후계획

◦ 도시재생(뉴딜) 활성화계획 수립 및 승인             : 2018. 09. ~ 2019. 03.

◦ 도시재생대학 등 주민역량강화 사업 추진       : 2019. 04. ~

◦ 도시재생 뉴딜사업 추진                       : 2019. ~ 2022.

남원 사매 일반산업단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위치/면적 : 사매면 월평리 산37-3번지 일원

- 토지이용계획 : 777천㎡(산업시설 588, 지원시설 6, 공공시설 183)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 주요유치업종 : 금속, 음료식품, 전자, 전기장비, 자동차부품 등

◦ 총사업비 : 640억원(시비 630, 특별교부세 10)

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2017	2018	2019	2020이후	비고
총 계	640	222	100	172	25	121
공 사	345		90	166	17	72	폐수처리부담액 (48억원)포함
보 상	190	185	1	4
용 역	51	32	4	1	7	7
기 타	54	5	5	1	1	42

□ 추진실적

◦ 산업단지계획 승인 고시(전북도)	: 2015. 5. 1.

◦ 용지 보상 추진(토지, 지장물)	: 2015. 8. ~

- 보상협의율 99.4% (317필지 699,355㎡ 중 314필지 695,724㎡ 완료)

◦ 일반산업단지 조성 사업(1차분) 준공(착공‘17. 3월)  : 2018. 5. 25.

◦ 일반산업단지 조성 사업(2차분) 착공(공정률 35%)    : 2018. 4. 23.

□ 쟁점 및 대책

◦ 보상 완료된 지장물 미철거에 따른 토공작업 지연

□ 지장물 소유자 개별 면담을 통한 조속한 철거 요청

□ 금후계획

◦ 산업단지 전기공사 및 통신공사 추진             : 2019. 3. ~ 12.

◦ 산업단지 조성사업 추진	: 2017. 3. ~ 2020. 6.

- 토공 2,219㎥, 우수암거 3.6km, 상수도 4.7km 등

◦ 2차분 준공                                     : 2019. 5.

◦ 전체분 준공                                    : 2020. 6.

남원 일반산업단지 국고지원사업

[진입도로, 공업용수도, 공공폐수처리시설]

□ 개    요

◦ 사업별 상세조서                                       (단위 : 억원)

구 분	총 계	진입도로	공업용수도	공공폐수처리시설	비고
총사업비	338	146	80	112
사 업 량	-	L=2.1㎞(B=19~22m) 북측 0.9㎞, 남측 1.2㎞	관로 L=16㎞(D350㎜) 배수관 5.7㎞, 송수관10.3㎞ 배수지(2,000㎥) 1식	연계처리관로 L=9.5㎞ (신설 7.2㎞, 개량 2.5㎞) 전처리시설 1개소 중개펌프장 7개소
사업기간	-	2016~2019년	2017~2020년	2018~2020년
진행과정	-	공사중 (공정률 90%)	공사중 (공정률 10%)	실시설계 추진 (‘18.7~’19.1)

◦ 연도별 투자계획                                       (단위 : 억원)

구 분	총계	기투자	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21이후	비 고
총 계	338	75	55	43	54	54	57
진입도로(국비)	146	75	51	20
공업용수도(국비)	80		4	18	29	29
공공폐처리시설(국비)	112			5	25	25	57

□ 추진실적

◦ 진입도로 2차분 준공(공정률 90%)	: 2017. 12.

- 3차분 착공                                       : 2018. 4. 16.

◦ 폐수연계처리 타당성 조사용역 착수	: 2018. 4. 12.

◦ 공업용수도 건설사업 착공 1차분(공정률 10%)        : 2018. 6.

◦ 폐수연계처리 실시설계 용역 착수	: 2018. 7. 27.

□ 쟁점 및 대책

◦ 산업단지 폐수 연계처리 타당성 조사 용역 시행 중

□ 폐수 처리방식 변경[자체처리(160억원) → 연계처리(98억원)] 검토 중

□ 금후계획

◦ 진입도로 개설사업 추진(3차분)	: 2018. 4. ~ 2019. 6.

◦ 공업용수도 건설사업 추진	: 2018. 6. ~ 2020. 6.

◦ 공공폐수처리시설 설치사업 실시설계용역 추진      : 2018. 7. ~ 2019. 1.

공원 조성 및 유지관리

□ 개    요

사업명	위 치	사업량	사업비 (백만원)	사업내용	비 고
계			5,230
도시공원 사유지 매입	금암공원 외7개공원	금암 19천㎡ 외 1,860천㎡	3,000	장기미집행시설(공원) 사유지 매입 추진	금암 1,000 월락 2,000
중앙공원 조성사업	동충동 197-1	41,247㎡	460	기본계획 및 실시설계 문화재 시굴조사	기본 및 실시설계 310 시굴조사 150
금암공원 조성사업	노암동 566-1	40,000㎡	650	기본계획 및 실시설계
어린이공원 리모델링	도통동 일원	3개소	900	물놀이터 조성 (1개소) 노후시설 재정비 (2개소)	신규 700 재정비 200
도시공원 유지관리	관내 일원	25개소	220	조경지 예초,제초 시설물 유지관리	근린(11)소공원 (2) 어린이 (12)

□ 추진실적

◦ 도시공원 사유지 매입 추진	: 2018. 1. ~

- 금암공원 : 3,781㎡ / 755백만원

- 7개 도시공원 우선관리지역 재조정을 위한 현장조사 : 2018. 8. ~ 9.

◦ 중앙 및 금암공원 기본계획수립 용역 시행 : 2018. 3. 20. ~ 2019. 1. 13.

- 전북대학교 산학협력단(*용역비 173백만원)

◦ 중앙공원 문화재 시굴조사(78백만원)                 : 2018. 9. ~ 12.

◦ 어린이공원 리모델링공사 시행	: 2018. 1. ~ 6.

- 도통6호 워터파크 조성(7억) / 도통3,7호 노후시설 재정비(2억)

◦ 도시공원 조경지 및 시설물 유지․관리	: 2018. 1. ~

□ 쟁점 및 대책

◦ 도시공원의 지가 상승과 소유자들의 반대로 협의매수 애로

- 도시공원 우선관리지역 재조정을 통한 사유지 매입 추진

- 우선관리지역 외 지역에 대하여 도시계획시설 재정비시 공원구역 해제 검토

□ 금후계획

◦ 도시공원 사유지 매입 지속 추진	: 2018. 9. ~ 2020. 6.

◦ 중앙 및 금암공원 기본계획수립 용역 실시(보고회,주민설명회 등)  : 2018. 10. ~

◦ 조경지 및 시설물 유지․관리(예초,제초,시설물 관리)       : 연중

2018. 10.

2018년 주요업무 추진실적

교   통   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2018년 주 요 업 무  결산

□ 2018년 주요업무 추진실적

◦ 시내버스 1,000원 단일요금제(신규)

◦ 대중교통 편의 시설물 확충·유지 관리

◦ 시내버스 운행정보시스템(BIS) 구축

◦ 남원공용버스터미널 아트공간조성

◦ 브랜드 택시 콜센터 구축사업(신규)

◦ 대중교통 CCTV 설치 지원(신규)

◦ 택시 총량제 감차보상 지원

◦ 화물자동차 공영차고지 운영

◦ 교통약자 특별교통수단 운영 편익 증진

◦ 공영주차장 조성

◦ 자전거 도로 정비

◦ 어린이교통공원 운영 관리

◦ 교통안전시설물 설치 및 관리

◦ 효율적인 교통지도 및 주차질서 확립

◦ 친절·신속·정확한 차량등록 민원 처리

일  반  현  황

□ 기    구

							교 통 과 장
							정 선 수
교통행정담당				교통지도담당							교통시설담당				차량등록담당
서 규 광				박 성 주							한 종 수				소 순 규
대중교통정책 교통안전계획 대중교통관리 터미널관리 택 시 관 리 화물자동차관리 특수여객관리				교통질서유지 주정차지도단속 주정차 민원처리 과태료 부과징수 무단방치차량관리 자동차관리사업							교통안전시설물관리 공영주차장 조성 어린이보호구역관리 교통신호체계관리 자전거도로 관리 교통사고 소송 교통공원관리				자동차 등록 이륜자동차등록 책임보험 관리 자동차 압류등록 자동차 제증명 건설기계등록관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	20	1	4	6	3	6
현 원	19	1	6	2	6	4
증 감	△1	-	2	△4	3	△2

※ 기타 : 공무직 6명(주차단속 4, 차량등록 1, 교통공원 1)

2018년 주요업무 결산

	< 주 요 성 과 >
◦ 안전하고 편리한 교통 환경조성으로 서비스개선 및 교통복지 실현 ◦ 교통시설의 효율적인 개선과 관리로 교통사고 예방 및 보행자 안전구현 ◦ 공영주차장 조성을 통한 주차난, 교통혼잡 해소와 교통 인프라 확충 ◦ 불법 주정차 차량의 효율적인 지도단속으로 선진교통 문화 정착

□ 교통환경 개선 및 이용 활성화

◦ 대중교통 시설물 유지관리	: 시내버스 승강장 109개소       (신규 14, 보수 및 정비 56, 태양광조명 30, 온열의자 9)

◦ 남원공용버스터미널 아트공간조성	: 10월 준공

◦ 시내버스 운행정보시스템(BIS)구축	: 5개 승강장 설치

◦ 교통약자 특별교통수단(장애인콜택시)운영	: 8대(8월 말 4,711건)

□ 효율적인 교통시설 개선

◦ 죽항동 주석건강원 외 5개 지구 조성 추진	: 6,520㎡, 159면

◦ 시청 제 2주차장 확장	: 128면→154면(26면 증)

◦ 자전거도로 정비사업	: 5개 지구(0.7km) 정비

◦ 횡단보도 및 차선도색 정비                   : 24.059km, 356백만원

◦ 교통신호등 및 경보등 정비	: 266개소, 353백만원

□ 교통질서 확립

◦ 주정차 질서 준수를 위한 지속적인 불법주정차 지도단속 : 3,264건

◦ 불법주정차 상습지역 중점 지도․단속으로 안전한 교통환경 조성

- 출퇴근 시간대, 시외버스터미널, 공설시장, 도통동 농협부근 등

◦ 불법주정차 단속 사전알림 서비스 시행 : 27,750건 제공(가입자 16,348명)

2018년 주요업무 추진실적

시내버스 1,000원 단일요금제(신규)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 어르신·학생 등 교통약자의 대중교통 이용 부담 경감 및                  교통복지 실현

◦ 사업기간 : 2019. 1월 ~

◦ 사 업 비 : 1,500백만원

◦ 현행요금 : 2천원 상한 요금제 ('17. 7. 1. 시행)

- 기본요금 : 일반 1,350원 (중·고생 1,100원, 초등학생 650원)

□ 요금제 용역 분석결과(‘16년도 교통량 조사결과)

단일요금 시행	연간운행거리	연간수입	손실규모 (재정지원금)	비고
1,000원	4,969,838km	2,189백만원	1,320백만원

※ 2016년도 용역결과 연간 운송수입 : 3,389백만원

□ 쟁점 및 대책

◦ 1,000원 단일요금제 시민홍보, 이용요금, 손실보전 등에 대한 합리적인       방안 필요

□ 읍면동 주민 설명회 등을 통한 의견수렴(10~11월) 및 교통량 조사(10월         완료)를 통한 합리적인 대책 마련

□ 금후계획

◦ 용역 결과에 따라 단일요금제 방법 협의                   : '18.  10월

◦ 운수업체(남원여객)와 협약 체결	: '18.  12월

◦ 시내버스 1,000원 단일요금제 시행	: '19.  1월

대중교통 편의 시설물 확충·유지 관리

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12월

◦ 사 업 비 : 316백만원(승강장 262, 태양광조명 54)

◦ 사업내용 : 대중교통 편의시설 확충 및 유지관리

- 시내버스 승강장 설치 및 보수 정비, 태양광 조명시설 설치, 버스         승강장 온열의자 설치 등

□ 추진실적

◦ 시내버스 승강장 신규 설치	:  14개소

◦ 시내버스 승강장 보수 및 정비	:  56개소

◦ 시내버스 승강장 환경정비(물청소, 광고물제거 등)	: 282개소

◦ 시내버스 승강장 태양광 조명시설 설치	:  30개소

◦ 시내버스 승강장 온열의자 설치	:   9개소

□ 쟁점 및 대책

◦ 대중교통 승강장 설치 대상지 중 도로점용 및 사유지 재산권 문제로 인한 신규설치 어려움

□ 승강장 설치 대상지 사전 조사 시 토지사용승낙 사전 징수를 통한 설치 추진

□ 금후계획

◦ 시내버스 승강장 신규 설치	: 2개소
◦ 시내버스 승강장 보수 및 정비	: 연중

시내버스 운행정보시스템(BIS) 구축

□ 개    요

◦ 사업목적 : 시내버스 운행정보 제공을 통한 대중교통 이용 활성화 및 편익 추진

- 시내버스 운행관리를 통한 불법운행방지 및 버스 재정지원 투명성 확보

◦ 사업기간 : 2018. 2. ~ 10월

◦ 사 업 비 : 100백만원

◦ 사업내용 : 시내버스 운행정보시스템 구축(현장안내기, 어플 등)

□ 추진실적

◦ 시내버스 운행정보시스템 구축 및 운영 협약 체결(부천시)  : '18. 2. 14.

◦ 시내버스 운행정보 표출 단말기(현장안내기) 설치 완료(5대) : '18. 5. 30.

◦ 시내버스 도착 위치정보 송출 서비스 개시	: '18. 6. 11.

◦ 시내버스 도착 시간정보 서비스 송출	: '18. 7. 30.

□ 쟁점 및 대책

◦ 시내버스 운행정보 등은 정상 표출중이나, 어플 개발이 계획 대비 다소 지연

□ 사업추진업체, 남원여객 등과 긴밀한 업무추진 체계 구축으로 이용객의         편익증진을 위하여 10월 중 사업완료 추진

□ 금후계획

◦ 시내버스 운행정보 스마트폰 어플 제작, 서비스 제공	: '18. 10월 중

◦ 시내버스 운행정보시스템 유지관리 계약 체결	: '18. 12월 중

남원공용버스터미널 아트공간조성

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 남원공용버스터미널 아트공간조성 사업

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12월

◦ 사 업 비 : 250백만원 (도비 100, 시비 150)

◦ 사업목적 : 시설개선 및 문화공간 신설을 통한 관광남원 이미지 제고

◦ 추진내용 : 공용터미널 시설환경개선 및 문화체험공간 조성 등

□ 추진실적

◦ 터미널 아트공간 조성사업 실시설계                  : '18. 4. 19.     ◦ 터미널 아트공간 조성사업 추진 협약 체결(전북문화관광재단)    : '18. 4. 21.

◦ 터미널 아트공간 조성사업 사업비 지급               : '18. 4. 30.

□ 쟁점 및 대책

◦ 청결한 터미널 유지관리 및 문화공연 체험프로그램 운영에 어려움 예상

□ 상시 청소인력(공공근로)을 배치하여 깨끗한 터미널을 만들고, 전북문화관광        재단과 협의를 통해 질 높은 공연으로 문화중심 터미널 조성 추진

□ 금후계획

◦ 터미널 아트공간 리모델링 완료	: '18.  10월

◦ 문화터미널 문화 프로그램 운영	: '18.  9 ~ 11월

◦ 문화터미널 개소행사 체험행사(국악공연 등)	: '18. 10월 중

브랜드 택시 콜센터 구축사업(신규)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 택시 콜센터 구축을 통한 서비스 개선 및 외부자본 유출 방지

◦ 사 업 명 : 브랜드 택시 콜센터 구축 사업

◦ 사업기간 : 2018. 9. ~ 12월

◦ 사 업 비 : 173백만원

◦ 사업내용 : 관제시스템 구축, 사무실 공사, 장비장착 등

□ 추진실적

◦ 타 자치단체 운영사례 벤치마킹	: '18. 3. ~ 5월

◦ 브랜드 택시 콜센터 세부 추진계획 수립	: '18. 7월

◦ 법인·개인택시 대표자·콜센터 운영 관계자 의견수렴    : '18. 7. ~ 8월

□ 쟁점 및 대책

◦ 남원 자체 콜센터 단일 브랜드 운영을 위한 남원콜 / 천사콜택시 통합 애로 등

□ 법인·개인택시 대표자 및 현 콜센터 운영 관계자 협의를 통한 통합브랜드 운영 추진

□ 금후계획

◦ 법인·개인택시 대표자·콜센터 운영 관계자 간담회	: '18. 10월

◦ 브랜드 택시 콜센터 구축 사업 추진	: '18. 10. ~ 11월

◦ 브랜드 택시 콜센터 시범운영	: '18. 12월

◦ 브랜드 택시 콜센터 운영	: '19.  1월

대중교통 CCTV 설치 지원(신규)

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 시내버스 및 택시 CCTV 설치 지원

◦ 사업기간 : 2018. 8. ~ 11월

◦ 사업목적 : 차량 내 CCTV 설치를 통한 승객 및 운전자 안전사고 예방

◦ 추진방법 : 민간자본보조사업

◦ 사 업 비 : 180백만원

연번	단체명	사업량(대)	단가(천원)	사업비(천원)	비고
계	8개단체	400		180,200
1	㈜남원여객자동차	43	1,700	73,100	버스 (43대)
2	개인택시조합	243	300	72,900	택시 (357대)
3	법인택시(6개사)	114	300	34,200

□ 쟁점 및 대책

◦ 교통사고 증거수집 및 범죄예방을 위해 설치한 CCTV로 개인정보 침해 우려

□ 행정안전부 CCTV 설치관련 개인정보보호 가이드라인, 서울시사례(2013년)

등을 분석하여 우리시 운영규정을 마련하여 개인 정보침해 사전대책 마련

□ 금후계획

◦ 남원여객 및 개인·법인택시 대표자와 사업 추진 협의     : '18.  9. ~ 10월

◦ 보조금 교부 및 계약 절차(입찰 등) 이행               : '18. 10월

◦ 사업 착공 및 완료	: '18.  10. ~ 11월

택시 총량제 감차보상 지원

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12월

◦ 면허대수 : 총 375대(개인 243, 법인 132)

◦ 사 업 량 : 10대(감차계획 80대)

◦ 사 업 비 : 130백만원(국비 39, 시비 91)

□ 추진실적

◦ 택시 감차실적 : 21대(17년 11대, 18년 10대)

- 대당 21,000천원(국비 3,900, 시비 9,100, 인센티브 8,000)

◦ 2018년도 감차위원회 회의	: '18. 1. 12.

- 택시 감차 규모 및 보상금 협의

- 감차 보상금 결정(대당 21,000천원, 법인기준)

◦ 2018년도분 감차 추진(10대)	: '18. 6월

◦ 2019년 이후 감차 규모 조정 감차위원회 개최	: '18. 8. 24.

- 감차 기간 계획 조정 및 연도별 감차대수 변경

◦ 감차대수 변경 고시(전라북도)	: '18. 9월

□ 쟁점 및 대책

◦ 업체의 감차 보상금 인상 및 개인택시 포함 요구

□ 타 지자체의 추진사례 비교 분석 등을 통해 감차위원회에서 적정한 가격        협의 결정토록 하고, 개인택시 감차는 보상금 과다로 현실적인 어려움 있음

□ 금후계획

◦ 2019년 감차 추진(20대)	: '19. 2. ~ 10월

화물자동차 공영차고지 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 상동리 75번지 일원

◦ 조성기간 : 2014 ~ 2017년(4년)

◦ 사 업 비 : 4,800백만원(지특 1,653, 시비 3,147)

◦ 사업규모 : 면적(24,000㎡), 주차장 219면(화물 169면, 승용 50면) 등

□ 추진실적

◦ 공사 착공	: '16.  6. 30.

◦ 공사 준공	: '17. 12. 11.

◦ 화물공영차고지 관리 및 운영 조례 제정	: '18.  4.  6.

◦ 화물공영차고지 관리위탁 동의안 의회 상정·의결	: '18.  6. 21.

◦ 화물공영차고지 관리 위탁기관(자) 모집공고(1차)	: '18.  8. 10.

- 화물공영차고지 관리 위탁기관(자) 선정 위원회 개최	: '18.  8. 16.

※ 협약 체결 과정 중 선정자 수익성 부족 이유로 관리위탁 포기

◦ 화물공영차고지 관리 위탁기관(자) 모집 재공고(2차)	: '18.  9. 19.

□ 쟁점 및 대책

◦ 민간위탁 추진 과정에서 임대료(26백만원) 부담 등으로 수탁자 선정에 어려움

□ 타 지역사례 분석, 화물운수업 관계자 등의 의견을 수렴해 종합적인(위탁·직영)        운영 방안 마련

◦ 화물공영차고지 이용 활성화 통한 교통사고 예방 대책 추진 필요

□ 화물 차주회, 차주 등에게 불법 주차 차량 차고지 이용 홍보 문자메시지 발송

□ 주요도로변 불법 밤샘 주차 차량 지속적인 계도(주1회) 및 단속 추진

□ 금후계획

◦ 화물공영차고지 합리적인 종합 운영계획 수립	: '18. 10월

교통약자 특별교통수단 운영 편익 증진

□ 개    요

◦ 사업목적 : 교통약자의 이동수단 지원으로 시민 삶의 질 향상 추진

◦ 운영대수 : 8대 (15년까지 6대, 16년 말 구입 2대)

◦ 사 업 비 : 297백만원 (도 89, 시 208)

◦ 운영방법 : 전북지체장애인협회 남원시지회 위탁운영

◦ 위탁기간 : 2016. 8. 1. ~ 2019. 7. 30. (3년간)

◦ 이용대상 : 장애인(1~2급), 65세 이상 거동불편 어르신, 휠체어 이용자 등

□ 추진실적

◦ 운영방법 및 시간조정에 따른 운영규정 개정	: '18. 1월

- 24시간 및 365일 운행으로 개선(이용요금 : 일반택시요금의 50%)

운영대수	구분	평 일	토 요 일	공 휴 일	비고
8대	주간	08:00~17:00(6대)	08:00~17:00(2대) 사전예약	08:00~17:00(2대) 사전예약
		09:00~18:00(1대)
		12:00~20:00(1대)
	야간	20:00~익일08:00 (1대) 사전예약	17:00~익일08:00 (2대)사전예약	17:00~08:00익일 (2대)사전예약

◦ 상반기 장애인 콜택시 운영실태 자체점검	: '18. 6월

◦ 장애인콜택시 이용자수('18. 8. 30. 기준)	: 4,711명

□ 쟁점 및 대책

◦ 특별교통수단 운영방식이 자치단체별로 상이하여 이용자 불편 해소

□ 전북도에 건의, 남원시 의견이 반영되어 운영시간, 이용요금 등 표준안을

도와 시·군 협의 중

□ 금후계획

◦ 교통약자 이동편의 증진을 위한 장애인콜택시 운영	: 연중

◦ 하반기 장애인 콜택시 운영실태 자체점검	: '18. 11월

공영주차장 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 죽항동 주석건강원 인근 외 4개 지구

◦ 사 업 비 : 3,800백만원 (국비 1,350, 시비 2,450)

◦ 사 업 량 : 6개 지구 총면적 6,520㎡ 주차면수 159면

① 죽항동 주석건강원 인근 793㎡(29면) ② 동충동 농협 동문지점 앞 1,264㎡(41면)

③ 인월면 새마을금고 인근 1,036㎡(30면) ④ 금동아파트 옆 1,735㎡(35면)

⑤ 남원 청소년 수련관 인근 803㎡(24면) ⑥ 도통동 성놀이터 옆 996㎡('19년 사업/부지매입)

□ 추진실적

◦ 죽항동 공영주차장 조성 완료	: '18. 5. 16.

◦ 동충동 공영주차장 토지보상 4건 및 실시설계 완료	: '18. 5월

◦ 금동 공영주차장 재산이관 및 실시설계	: '18. 6월

◦ 도통동 공영주차장 토지보상 완료 및 실시설계	: '18. 6. ~ 7월

◦ 동충동 공영주차장 조성 중	: '18. 7. ~ 10월

□ 쟁점 및 대책

◦ 감정평가결과 가격 불만족에 따른 사업추진 어려움 및 주거 밀집지역        소형 주차장 조성요구

□ 사업의 원활한 추진을 위해 가감정을 통한 매매의사 확인 후 사업시행

□ 주거 밀집 지역 등에 소형주차장(포켓형 등) 조성하여 주차환경 개선 추진

□ 금후계획

◦ 금동 공영주차장 조성공사 추진	: '18.  9. ~ 11월

◦ 인월면 공영주차장 토지보상 및 공사 추진	: '18. 10. ~ 12월

◦ 동충동 청소년 수련관 인근 주차장 조성 추진	: '18. 10. ~ 12월

자전거 도로 정비

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 자전거도로 충정로 외 6지구

(충정로, 시청로, 동림로, 의총로, 시청남로, 노송로, 교룡로)

◦ 사 업 량 : 자전거도로 정비 L=3.0km

◦ 총사업비 : 300백만원

◦ 사업기간 : 2018. 4. ~ 11월 [1차(4~6월), 2차(7~11월)]

□ 추진실적

◦ 자전거도로 대상지 현지조사 및 정비계획 수립	: '18. 1월

◦ 자전거도로 정비사업 실시설계	: '18. 2월

◦ 자전거도로 정비사업 착공	: '18. 4월

◦ 5개 지구 완료(충정로, 시청로, 동림로, 의총로, 교룡로) L=0.7㎞	: '18. 5월

◦ 편의시설(자전거공기주입기) 11개소 설치	: '18. 7월

□ 쟁점 및 대책

◦ 시가지 자전거도로의 노후와 파손구간이 많아 자전거 이용에 불편호소

◦ 자전거도로 주변 융기현상과 싱크홀 등 사고예방을 위한 정비필요

□ 자전거 이용자들의 불편호소구간(노후구간 및 위험구간) 지속적인 정비 추진

□ 금후계획

◦ 자전거도로 2차 정비공사 추진                     : '18. 9 ~ 11월

- 시청남로(우성아파트 뒤) L=1.4㎞, 노송로(노암주공앞) L=0.7㎞

어린이교통공원 운영 관리

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 이백면 이백로 333  ※ 개 관 : 2006. 6. 15.

◦ 규    모 : 부지 9,191㎡(2,780평), 건축물 597㎡(180평)

◦ 주요시설 : 실내․외 교통안전 교육장, 야외 체험장, 편의 시설 등

◦ 운영인력 : 10명(직원 2, 자원봉사자 8)

□ 추진실적

◦ 평균 이용객현황

(단위 : 명/ '18. 8월 기준)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
총인원	7,905	8,004	7,922	8,148	8,582	5,719
일평균	26	26	26	27	29	29
월평균	659	667	660	679	715	715

◦ 어린이집 및 유치원 단체 교육 : ‘18. 8. 기준/49개소 1,749명(관내 69%, 관외 31%)

◦ 관내·외 어린이집(유치원) 교육 안내 및 시설물 이용 홍보  : '18. 2월

◦ 어린이교통공원 옥상 방수공사 완료                    : '18. 4월

◦ 실내교육장 시설물 보수 및 CCTV(6대) 설치	: '18. 4. ~ 5월

◦ 실외체험장 화단정비 공사                             : '18. 6월

□ 쟁점 및 대책

◦ 각종 시설물 및 교육기자재의 내구연한 도래에 따른 시설노후 및 교육

효율성 저하(2006년 개관)

□ 현재의 시설을 최대한 활용한 시설보수 및 교육기자재 보강 추진

□ 금후계획

◦ 교통공원 활성화 홍보(리플릿 배부 및 교차로, 방송 홍보 게재의뢰 등) : 수시

◦ 자원봉사자에 대한 교육으로 질 높은 교육 서비스 제공 : 분기별 1회

◦ 건물 외벽 보수공사 및 실내교육 시스템 보수 : '18. 9. ~ 11월

교통안전시설물 설치 및 관리

□ 개    요

◦ 사업목적 : 교통환경 개선 및 시설물 정비로 안전한 도시환경 조성

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12월

◦ 사 업 량 : 교통신호등 외 6종(교통안전시설물)

◦ 사 업 비 : 1,350백만원(시비)

◦ 교통안전시설물 현황

신호기(등)	경보기(등)	표지판	노면표시	경광등	횡단보도 조명등	무인교통 단속카메라
137개소	290개소	6,188개	횡단보도 : 623개소 차 선 : 633km 문자기호 : 3,086개소	79개소	89개소	30개소

□ 추진실적

◦ 횡단보도 및 차선정비 유지보수	: 24.05㎞   / 356백만원

◦ 교통표지판 설치 및 유지보수	: 487개소  / 172백만원

◦ 발광형 표지판 20개소 설치(‵18. 6월)	: 20개소    /  68백만원

◦ 교통신호등(경보등) 설치 및 유지보수	: 266개소  / 353백만원

◦ 교통신호등 및 경보등 전기안전점검	: 1,147개소 /  28백만원

◦ 무인단속카메라 설치(인월 장평, 이백 척동)	: 2개소    /  61백만원

□ 쟁점 및 대책

◦ 읍면지역 주민의 교통민원 해결을 위해 2~3년마다 차선도색 및 유지관리로 교통사고 예방 필요함

□ 읍·면지역 차선도색을 통한 사고예방을 위해 '19년 예산확보 추진

□ 금후계획

◦ 하반기 차선도색 및 유지보수 추진 중	: '18. 9. ~ 12월

◦ 하반기 교통표지판 설치 및 유지보수 추진 중	: '18. 9. ~ 12월

◦ 하반기 교통신호등(경보등) 설치 및 유지보수 추진 중    : '18. 9. ~ 12월

효율적인 교통지도 및 주차질서 확립

□ 개    요

◦ 단속지역 : 남원시 일원

◦ 인원․장비 : 2개반  6명(운전원2, 공무직4),  차량 2대, 고정식CCTV 15개소

◦ 단속시간 : 09:00~19:00(단속유예 12:00~14:00)

◦ 단속방법 : 차량 및 고정식 CCTV이용 단속실시(10분 유예)

□ 추진실적

◦ 주정차 질서 유지를 위한 불법주정차 지도 단속실적 : 3,264건

◦ 불법주정차 단속 사전알림 서비스제공 : 27,750건(가입자 16,348명)

◦ 불법주정차 상습지역 중점지도단속 : 시외버스터미널, 공설시장 등

□ 쟁점 및 대책

◦ 불법주차로 인한 통행 및 교통방해 차량에 대한 즉시단속 요구와 주변상가의 영업지장을 이유로 한 상대적 민원발생이 빈번함

□ 효율적인 불법주차 지도단속으로 교통불편 해소 및 선진교통 문화 정착

□ 금후계획

◦ 불법주정차 차량의 신속한 지도 단속으로 시민 교통 불편최소화 : 수시

◦ 교차로, 횡단보도, 인도, 버스정류장 등 불법주정차 집중 지도·단속  : 수시

◦ 선진교통질서 지키기 홍보활동 강화(언론, 통·리장 회보 등)	: 연중

친절·신속·정확한 차량등록 민원 처리

□ 개    요

◦ 2018. 8월 말 차량등록 대수 : 53,251대 / '17년 8월 : 50,782대 ⇒ 2,469대 증

- 자동차 43,706대, 건설기계 2,415대, 이륜차 7,130대

◦ 등록대상(6종) : 승용차, 승합차, 화물차, 특수차, 건설기계, 이륜차

연도별	자동차	건설기계	이륜차	증감대비
2015	38,819	2,161	7,161
2016	40,730 (증 1,911)	2,188 (증 27)	7,120 (감 41)	1,897 증
2017	42,245 (증 1,515)	2,314 (증 126)	7,085 (감 35)	1,606 증

□ 추진실적

◦ 자동차 신규, 이전, 압류, 말소(폐차) 등 민원처리	: 일 평균 430건

◦ 자동차 정기검사, 책임보험 가입안내(우편발송)	: 29,850건

※ 사전안내 ⇒ 경과안내 및 독촉 ⇒ 과태료 처분 ⇒ 차량 압류

◦ 자동차 정기검사·책임보험 지연 과태료 부과	: 2,532건 95백만원

◦ 소형 건설기계 조종사 면허 발급(3톤 미만)	: 673건

◦ 무보험운행차량 사건 검찰송치 및 통고처분(내사종결)   :  32건

□ 금후계획

◦ 자동차 보험, 검사, 등록(변경), 말소(폐차) 및 자동차등록관리	: 연중

◦ 무보험 운행차량 사건 검찰 송치 및 통고처분(내사종결)	: 수시

2018. 10.

2018년 주요업무 추진실적

농   정   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2018년 주 요 업 무  결산

□ 2018년 주요업무 추진실적

◦ 청년창업농 영농정착 지원사업

◦ 농업인 상생플랫폼 건립

◦ 농업 경영개선·후계인력 육성

◦ 농가소득 안전망 확충 및 복지향상

◦ 체재형 가족실습농장 조성

◦ 귀농귀촌 농촌정착 지원

◦ 귀농·귀촌인 신규마을 조성

◦ 임순남 도농인력지원센터 운영

◦ 쌀 소득안정 및 경쟁력 제고

◦ 공동브랜드쌀 남원참미 경쟁력 강화

◦ 고품질 쌀 경쟁력 제고 및 유통기반 확대

◦ 농촌 중심지 활성화

◦ 활기찬 농촌프로젝트 시범사업

◦ 창조적 마을 만들기(권역개발)

◦ 창조적 마을 만들기(마을단위)

◦ 소규모 경지정리사업

◦ 낙덕지구 지표수보강개발

◦ 지리산 구룡계곡 흙탕물 저감사업

◦ 안전영농 환경조성

◦ 안전농업 기반확충

◦ 재해위험저수지 정비

◦ 농촌관광거점마을 육성

◦ 생생마을 만들기

일  반  현  황

□ 기    구

									농 정 과 장
									이 준 무
농업행정담당				귀농귀촌담당				쌀산업담당					농촌개발담당						농업시설담당					농촌활력담당
진 삼 채				류 창				김 영 선					조 대 성						성 월 계					김 맹 수
농발계획 농림사업 인력육성 농업인복지 농지관리 소득금고				귀농귀촌지원 도시민유치 도 농 교 류 신규전원마을 소규모삶터 귀농종합센터				고품질쌀생산 정부양곡관리 쌀소득직불제 밭농업직불제 농 기 계 지 원 농 약 관 리					농산어촌개발 농촌중심지활성화 생활환경정비 창조마을만들기 시군역량강화 ICT융복합						농업기반조성 농업용수개발 수리시설개보수 농로경작로포장 재해위험저감 국유재산관리					농촌복합자원화 농촌관광개발 생생마을만들기 농식품6차산업 민박육성 향토산업육성

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	27	1	6	10	6	4	2
현 원	26	1	8	8	1	8	2
증 감	△1	-	2	△2	△5	4

□ 농가인구

◦ 농 가 :  8,393호(시 전체 33,479호의 26.1%) 전국의 0.8%, 전북의 8.7%

◦ 인 구 : 18,925명(시 전체 84,856명의 22.8%) 전국의 0.8%, 전북의 8.5%

◦ 농촌마을 : 341마을

□ 경지면적

◦ 경 지 : 16,899ha(논 12,566, 밭 4,333/호당 2.0ha), 총면적의 20.3%

- 농업진흥지역 : 11,421.8ha(전체의 67.0%)

·진흥구역 9,937ha(87.0%)       ·보호구역 1,484.8ha(13.0%)

[ 벼 재배면적 ]

◦ 농가수 / 면적 : 7,655호 / 9,148ha

◦ 생산량 및 총소득액 : 70,256톤 / 1,100억원

◦ 정부양곡 보관창고 및 보관량 : 63동 16,078톤

- 농협 : 52동 10,912톤           - 곡협 : 11동 5,166톤

□ 농업생산기반

◦ 수   리   답 : 10,028ha(답 면적의 87.0%)

◦ 경 지 정 리 : 10,330ha(답 면적의 89.6%)

◦ 농 로 확·포 장 : 1,785km 중 1,556km(86.1%)

- 기계화농로  :   500km 중  430km(86.0%)

- 일 반 농 로  : 1,285km 중 1,126km(87.6%)

[ 가뭄대책 시설장비 ]

◦ 용 수 원 : 저수지 220개소, 대형관정 259개소, 양수장 58개소, 취입보 120개소

◦ 한해장비 : 양수기 262대, 송수호스 37km

□ 단체 등 기타

◦ 농업인단체 : 6개, 4,038명

- 농촌지도자협의회 : 550명     - 생활개선회 : 820명

- 농민회 : 500명	- 4-H 본부 : 297명

- 농업경영인 남원시연합회 : 1,201명

- 쌀 전업농 : 670명

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 농업계학교 실습장 지원사업 공모 선정 : 남원용성고 500백만원 ◦ 2018년 청년창업농 영농정착지원사업 : 17명 선정 ◦ 농업인턴제(청년일자리사업) 지원사업 선정 : 15명 205백만원 ◦ 2018년 귀농귀촌 유치 : 488가구, 683명 (2018. 8월 말 기준) ◦ 고품질 유통활성화 미곡종합처리장 시설 현대화 추진 : 1,010백만원 ◦ 2018년 농기계 작업대행 지원 : 2대, 305백만원 ◦ 2018년 일반농산어촌 개발 신규 공모사업 예산확보 추진 : 13개사업(15,575백만원) ◦ 경지정리사업 3개지구(갈촌, 포암, 화정) 국·도비 확보 : 12억원 ◦ 농촌관광 거점마을 조성 시행 및 농촌관광 시스템 구축

□ 농업인 복지증진, 농업경영 역량강화 및 후계인력 육성

◦ 복지지원확대(농업인월급제, 고령농업인 지원 등) 12개사업 2,878백만원

◦ 농업인자녀학자금 202명, 여성농업인 생생카드 1,876명 지원

◦ 경영안전 장치 강화 : 농작물 재해보험 8.31일 현재 6,497ha(2017년 5,921ha), 농업인 안전보험 6,658명, 농기계 종합보험 918대

◦ 후계농업인 육성 19명 3,710백만원, 농업경영컨설팅 7농가 90백만원(개인 6, 법인 1)

◦ 농림분야 지원사업 안내책자 배부 : 910부

◦ 농업인월급제사업 추진 : 742농가

◦ 고령영세규모 농업인 농작업비 지원 : 532명

□ 귀농귀촌 유치 활성화

◦ 귀농‧귀촌인 유입 성과 : 488가구 683명 (‘18. 8월 말 기준)

◦ 박람회 참가(5회), 전북 수도권 홍보관 운영(3회), 도시민 농촌체험(2회), 귀농교육(6회)

◦ 귀농 창업자금 및 주택구입(신축)자금 융자 지원(46가구 8,913백만원)

◦ 신규마을(주천 숲속전원마을) 조성사업 준공(‘18. 6월)

◦ 소규모 삶터 2개소, 9가구 조성완료 : 산내 중황지구(5가구), 덕과 한우리지구(4가구)

◦ 이사비 지원(74가구, 72백만원), 주택수리비 지원(32가구, 160백만원)

□ 남원쌀 품질 고급화 및 농업경쟁력 강화

◦ 벼육묘용상토 지원 : 7,477농가, 503,000포, 1,450백만원

◦ ˊ18년 농기계 지원 : 14종 390대, 3,200백만원(시비 1,000, 자담 2,200)

◦ 쌀 경쟁력제고사업 : 4개 사업, 904백만원

◦ ˊ18년 농기계 작업대행 지원 : 2대, 305백만원(도비54.9, 시비128.1, 자담122)

◦ 농업기계 안전등화장치 부착지원 : 392대, 40백만원(국비16, 도비7.2, 시비16.8)

◦ ˊ18년 쌀소득보전 시비직불금 : 7,574호, 8,905㏊, 5,000백만원

◦ ˊ18년 쌀소득보전 고정직불금 지원 : 9,050호, 11,366㏊, 1,328.5백만원

◦ ˊ18년 밭농업직불금 지원 : 5,942호, 3,580㏊, 1,695.3백만원

□ 창의적인 농산촌 개발로 소득창출과 삶의 질 향상

◦ 농촌중심지 활성화 : 4개지구(인월,운봉,금지,산내), 24,680백만원

◦ 창조적마을만들기(권역단위) : 2개지구, 8,678백만원

◦ 농촌생활환경정비 : 6개면, 286백만원

◦ 창조적마을만들기(마을단위) : 14개마을, 6,753백만원

◦ 활기찬농촌프로젝트 시범사업 : 1개지구, 8,000백만원

□ 농업생산기반시설 현대화로 안전영농 기반 구축

◦ 수리시설 및 저수지 시설 보수·보강 : 90건, 1,375백만원

◦ 용배수로 현대화 사업 : L=104㎞ (366건, 104억원)

◦ 농로 및 기계화 경작로 포장사업 : L=84㎞ (379건, 117억원)

◦ 경지정리사업(갈촌,포암,화정/42ha) : 3개지구, 5억원(가을착수)

□ 체험관광 네트워크 구축 및 농촌활력 촉진

◦ 농촌관광거점마을 : 거점센터 공사 등 추진 2,600백만원

◦ 생생마을만들기 : 기초단계 5개소 25백만원, 사후관리 2개소 100백만원, 중간지원조직 1식 50백만원, 농촌과소화 인력육성 1식 44.5백만원, 전북형에너지자립마을 1개소 100백만원

◦ 농촌체험마을 육성 : 사무장 지원, 역량강화, 박람회 참가지원 등

◦ 농촌관광 시스템 구축 : 팜투어 12건(17팀, 795명), 88백만원

◦ 공모사업 선정 : 2건, 70백만원(농촌축제, 클린라이프 시설구축)

□ 농정민원 신속처리로 고객만족도 향상

◦ 농지전용 허가(협의) : 921건, 1,429,357㎡

◦ 농지 타 용도 일시사용 허가(협의) 처리 : 18건, 167,373.2㎡

◦ 산지 개간 허가 : 49건, 128,930㎡, 구거 목적 외 사용승인 : 86건, 101,194.3㎡

2018년 주요업무 추진실적

청년창업농 영농정착 지원사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

◦ 사업대상 : 만 18세 이상 40세 미만, 영농경력 3년 이하 독립경영자에                  최대 100만원 지급 (단, 자산․소득이 높은 자 제외)

◦ 사 업 비 : 126.1백만원(국비 86.51, 도비 11.877, 시비 27.713)

□ 추진실적

◦ 청년농업인 영농정착지원 사업 지침 시달    : ˊ17. 12월

◦ 1차 청년창업농 영농정착지원사업 신청 및 접수  : ˊ17. 12. 28. ~ ˊ18. 1. 30.

◦ 1차 대상자 확정                           : ˊ18. 4. 6.

- 서면․면접평가 : 지원자 36명 중 13명 선정(총점 50%, 영농경력 50%)

◦ 2차 청년창업농 영농정착지원사업 신청 및 접수  : ˊ18. 6. 8. ~ ˊ18. 7. 2.

◦ 2차 대상자 확정                            : ˊ18. 9. 4.

- 서면․면접평가 : 지원자 23명 중 최종 4명 선정(총점 50%, 영농경력 50%)

※ 1차, 2차 선정자 17명 중 독립경영 1년차 13명, 2년차 1명, 3년차 2명,        독립경영예정자 1명(1년차 월100만원, 2년차 월90만원, 3년차 월80만원 지원)

□ 쟁점 및 대책

◦ 1차, 2차 선정자 총 17명 중 1명이 독립경영예정자로, 독립경영 개시       확인 후 영농정착지원금 지급 예정이나, 영농 기반확보에 어려움이 있음

⇒ 대안으로 농업인턴제 지원 사업(청년일자리사업)과 연계하여 독립          예정자가 농업기술을 습득할 수 있도록 사업 안내

□ 금후계획

◦ 청년농업인 영농정착지원사업 대상자 의무사항 점검       : 분기별

◦ 19년 예비 청년창업농 대상 영농계획서 작성요령 교육실시(도) : 10월 중

농업인 상생플랫폼 건립

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 이백면 서곡리 429번지 농업기술센터 부지 내

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2018년(2년)

◦ 사 업 비 : 17억원(시군창의 438, 도농연계 270, 자체 992)

◦ 규    모 : 건물연면적 672㎡(지상 2층)

- 지상 1층 : 다목적실, 소회의실 및 2개 단체 사무실(334㎡)

- 지상 2층 : 중회의실 및 4개 단체 사무실(338㎡)

□ 추진실적

◦ 지방재정 투융자 심사	: ˊ15. 11월

◦ 농업인 단체 간담회 등 의견수렴(장소, 규모 등)	: ˊ16. 1 ~ 11월

◦ 관련예산 확보

- 농산어촌개발 시·군창의(인재육성센터) 438백만원	: ˊ16. 11월

- 도농연계 6차산업화사업(공동이용시설) 270백만원	: ˊ16. 11월

- 농업인상생플랫폼 신축계획 정립(부족예산 시비로 확보): ˊ17. 7월

◦ 기본계획 수립 및 실시설계 용역발주	: ˊ17. 6월

◦ 공유재산 심의	: ˊ17. 9월

◦ 공사발주 및 착공	: ˊ18. 6월

□ 금후계획

◦ 농업인 상생플랫폼 설치 및 운영조례 제정	: ˊ18. 11월

◦ 공사 완공 및 입주	: ˊ19. 2월

◦ 입주예정 단체 : 농업인 단체 및 농업·농촌 관련 단체 중 희망단체

⇒ 상근 직원이 있는 단체 우선 배정

농업 경영개선·후계인력 육성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 4,326.1백만원(보조 171.1, 융자 4,110, 자부담 45)

◦ 사업내용 : 농업경영컨설팅 지원 등 3개

◦ 세부사업

사 업 명	사업량	사 업 비 (백만원)							비 고
		합계	보 조				융 자	자부담
			소계	국비	도비	시비
계	41명	4,326.1	171.1	113.51	17.277	40.313	4,110	45
농 업 경 영 컨설팅 지원	7개소	90	45	27	5.4	12.6	-	45
후계농업 경 영 인 지 원	19명	3,710	-	-	-	-	3,710	-	50세 이하 /연리 2%
우수농업경영인 추 가 지 원	2명	400	-	-	-	-	400	-	경영인선정 5년후/연리1%
청년영농정착지원	17명	126.1	126.1	86.51	11.877	27.713	-	-

□ 추진실적

◦ 후계농업경영인 육성(ˊ81~ˊ18년) : 1,314명(남 1,062, 여 252) ※ 18년 19명

◦ 우수후계농업경영인 추가지원(ˊ06년~ˊ18년) : 132명(남 123, 여 9) ※ 18년 2명

◦ 청년영농정착지원 사업 대상자 선정 : 17명 사업 선정

※ 독립경영 1년차 월100만원, 2년차 월90만원, 3년차 월80만원, 최대3년까지 지원

◦ 농업경영 컨설팅 지원사업 중간 현장점검 완료

□ 쟁점 및 대책

◦ 2018년 선정된 신규 후계농의 대출신청기간은 선정 후 5년이나, 대출 실행 후 2년 이내에 사업을 완료해야 하며 미완료시 후계농 선정 취소

⇒ 선정된 후계농에 대한 사업 지도 철저로 기한 내 완료

□ 금후계획

◦ 청년농업인 영농정착지원사업 대상자 의무사항 점검(분기별)

◦ 후계농업경영인, 우수후계농업경영인 교육 이행 점검

◦ 농업경영컨설팅 완료점검 실시 : ˊ18. 11월 ~

농가소득 안전망 확충 및 복지향상

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 2,877.9백만원(보조 2,257.12, 자부담 620.78)

구 분	사업량	사 업 비(백만원)
		계	국비	도비	시비	자부담
계	12개 사업	2877.9	0	590.37	1,676.65	622.78
농업인자녀학자금지원	290명	333	-	83	250	-
영농도우미지원	76명	13.7	-	2.0	4.8	6.8
농작물재해보험	4,000ha	864	-	259	346	259
농업인안전보험	6,500명	362	-	54	127	181
농기계종합보험	737대	204	-	31	71	102
출산여성농가도우미	19명	79.8	-	19.95	51.87	7.98
여성농업인센터지원	2개소	262	-	52.5	183.5	26
농업정보지보급	1,354부	105	-	21	84	-
농번기공동급식	11개마을	26.4	-	7.92	18.48	-
여성농업인생생카드	2,000명	240	-	60	140	40
농업인월급제	200,000포	100	-	-	100	-
고령영세농업인농작업비지원	200ha	300	-	-	300	-

□ 추진실적

◦ 농업 안전장치 강화 : 농작물 재해보험 8.31일 현재 6,497ha(2017년 5,921ha), 농업인 안전보험 6,658명, 농기계 종합보험 918대

◦ 농업인복지향상 및 영농서비스 : 출산도우미 21명, 영농도우미 54명, 학자금 202명, 농번기 공동급식 11개소, 여성농업인 생생카드 1,876명(3차 신청자까지), 정보지보급 1,354부/월, 여성농업인센터 2개소, 농업인월급제 741농가, 고령영세농업인농작업비 532명

□ 쟁점 및 대책

◦ 전라북도 삼락농정 사업의 일환으로 추진 중인 농번기 공동급식 지원사업 점검결과 사업 기간 연장 및 부식비 지원에 관한 건의사항이 있어 도에 적극 건의하였음. 미반영시 시비의 추가지원을 검토하겠음.

□ 금후계획

◦ 2018년 하반기 사업 후 정산 결과 보고 : ˊ18. 12월

체재형 가족실습농장 조성사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2018년

◦ 위    치 : 남원시 주생면 상동리 102-2번지 외 6필지

◦ 사 업 비 : 2,050백만원(지특 976, 시비 1,074)

◦ 사 업 량 : 주택 10동(45㎡4동, 51㎡ 6동) 공동창고 1동, 실습농장(3,300㎡)

게스트하우스 1동 (게스트룸 2호, 세미나실, 관리사무실)

◦ 사업내용 : 예비 귀농귀촌인을 위한 임시거주시설을 마련하여 안정적인 정착을 지원

□ 추진실적

◦ 체재형 가족실습농장 추진계획 수립	: ˊ17. 3. 3.

◦ 체재형 가족실습농장 조성사업 추진계획(변경)    : ˊ17. 6. 1.

- 대상지 변경 : 주생면 중동리 ⇒ 주생면 상동리

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ˊ17. 9. 28. ~ ˊ18. 5. 4.

- 설계변경을 통한 게스트하우스 조성사업 일괄 추진 : ˊ18. 2. 19.

◦ 원가심사 의뢰 및 결과통보(전북도)         : ˊ18. 6. 19. ~ 7.13.

◦ 체재형 가족실습농장 착공                       : ˊ18. 9. 6.

□ 금후계획

◦ 운영관리 계획 및 조례제정	: ˊ18. 11월

◦ 공사 완공 및 입주자모집 예정                        : ˊ19. 3. ~ 4.

귀농귀촌 농촌정착 지원

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 1,928백만원(국비 612, 도비 30, 시비 1,286)

◦ 단계별 주요사업내용

단계별	주요사업내용
관심단계	·귀농귀촌센터 운영, 박람회 참가, 도시민 귀농학교 ·도시민농촌유치지원, 귀농귀촌교육, 도시민 상담 등
실행단계	·귀농귀촌 이사비, 귀농인 농가주택수리비 등
정착단계	·귀농귀촌 자녀 정착금 지원 등 ·귀농 창업자금, 주택구입(신축)자금 융자 지원
관리단계	·멘토컨설팅, 재능기부, 마을환영회, 중간조직활성화 등

□ 추진실적

◦ 귀농‧귀촌인 유입실적 : 488가구 683명(‘18. 8월 말 기준)

◦ 도시민을 대상으로 찾아가는 귀농귀촌 홍보 활동, 농촌 체험활동 연계 교육 실시

- 귀농귀촌 박람회 참가(5회), 전북 수도권 홍보관 운영(3회/130명)

- 도시민 초청 농촌체험교육(2회/57명), 여성귀농학교(1회/24명), 도시민 귀농학교(2회/56명)

◦ 귀농귀촌 초기 안정적 정착 유도를 위한 지원 정책 추진

- 이사비 지원(74가구, 72백만원), 주택수리비 지원(32가구, 160백만원)

- 귀농 농업창업 및 주택구입 자금 융자지원(46가구, 8,913백만원)

- 멘토컨설팅 사업, 귀농인의 집 입주 지원, 빈집 및 농지 정보 구축

□ 금후계획

◦ 홍보 강화 : 박람회 참가, 수도권 홍보관, 농촌체험 프로그램 운영

◦ 귀농귀촌인의 안정적인 정착지원 강화

- 주택수리비, 이사비, 귀농 농업창업자금 및 주택구입(신축)자금 지원

- 귀농귀촌 자녀 정착금 지원, 멘토 컨설팅 운영

◦ 화합 프로그램 운영 : 재능기부단, 마을환영회, 귀농귀촌인의 날 운영

귀농·귀촌인 신규마을 조성사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 1,990백만원

◦ 사업내용 : 농촌에 쾌적한 주거 공간 조성 및 마을 기반시설 조성을 지원하여 도시민 유입 촉진 및 농촌지역 활력제고

◦ 신규마을(주천 숲속전원마을) 조성사업(공모사업)

- 사 업 비 : 3,890백만원(국비 1,148, 시비 492, 자부담2,250)

- 사 업 량 : 신규마을(41세대 / 대지면적 : 54,860㎡) 기반시설 조성

◦ 소규모 삶터 조성사업

- 사 업 비 : 350백만원

- 사 업 량 : 소규모삶터 6~7개소 조성 추진

□ 추진실적

◦ 신규마을(주천 숲속전원마을) 조성사업

- 마을정비구역 지정(변경) 승인	: ˊ17. 4. 25.

- 사업시행계획 승인                                  : ˊ17. 8. 25.

- 기반조성 공사 착공                                 : ˊ17. 10. 23.

- 기반조성 공사 준공                                 : ˊ18. 6. 26.

- 사업 부분준공 승인 및 고시                         : ˊ18. 9. 7.

- 주택건축 신고 및 착공                              : ˊ18. 9. 10. ~

◦ 소규모삶터 조성사업

- 조성예정 : 산내 백일(4가구), 산내 백일2(6가구), 운봉 화수(5가구), 인월 상우리(6가구), 주천 고기리(5가구) 등

※ 조성예정지구 입주자 주택건축 관련 인허가 절차 이행 중

□ 금후계획

◦ 신규마을(주천 숲속전원마을) 조성사업

- 준공검사 및 공공시설물 기부채납(조합→남원시) 추진    : ˊ18. 10월 ~

◦ 소규모삶터 조성사업

- 소규모 삶터 활성화를 위한 지침 변경(조성가능지역, 신청조건 등) : ˊ18. 10월

- 소규모 삶터 조성사업 사업 추진                             : ˊ18. 10월 ~

임순남 도농인력지원센터 운영

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.

◦ 참여기관 : 6개 기관․단체 (남원시․조공, 임실군․조공, 순창군․조공)

◦ 위    치 : 남원원협 원예공판장 2층 / 상담사 1명

◦ 총사업비 : 135백만원(균특 35, 시비100)

◦ 사업내용 : 센터 설립운영, 구인․구직 정보제공, 안전교육, 농업인력 수송지원

□ 추진실적

◦ 구인농가․구직자 모집 및 농작업 인력공급	: 상시

※ 운영실적 : 구인 515농가, 구직 412명, 인력공급 3,604명 (ˊ18. 8. 31.)

◦ 상반기 농작업자 안전교육 실시            : ˊ18. 3. 11.

◦ 구인 농가․구직자 모집을 위한 홍보 활동	: ˊ18. 5월

- 홍보 현수막 설치(15개소), 단위농협 별 홍보 현수막 게시

◦ 양파 작목반 수확 작업팀 연계·지원       : ˊ18. 6월

◦ 멜론 수확 작업팀 구성 및 인력 지원       : ˊ18. 7월

□ 금후계획

◦ 구인․구직자 모집 및 농작업 인력공급       : 수  시

◦ 하반기 농작업자 안전교육 실시             : ˊ18. 10월

쌀 소득안정 및 경쟁력 제고

□ 개    요

◦ 사 업 량 : 쌀직불금 11,366㏊(진흥지역 8,017, 진흥지역 밖 3,349)       농기계 390대(트랙터 등 13종)

◦ 대상(예상)농가 : 9,440명(쌀직불금 9,050 농기계지원 390)

◦ 사 업 비 : 23,008백만원(국비 13,191, 도비 1,325, 시비 6,292, 자담 2,200)

◦ 사업내용 : 쌀 소득보전 직불금 지원 등 2개 사업

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	계	보조금				자부담	비고
			소계	국비	도비	시비
계		23,008	20,808	13,191	1,325	6,292	2,200
쌀소득등보전직불금(국비)	11,366㏊	11,521	11,521	11,521
쌀소득등보전직불금(도비)	9,283㏊	1,200	1,200		1,200
쌀소득등보전직불금(시비)	8,891㏊	5,000	5,000			5,000
쌀소득보전직불제 농기계 지원	390대	3,200	1,000			1,000	2,200
논 타작물 재배 지원	614㏊	2,087	2,087	1,670	125	292

□ 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	계	보조금				자부담	비고
			소계	국비	도비	시비
합 계		19,528.5	17,328.5	11,328.5		6,000	2,200
쌀소득등보전직불금	11,366㏊	11,328.5	11,328.5	11,328.5
쌀소득등보전직불금(시비)	8,891㏊	5,000	5,000			5,000
쌀소득보전직불제 농기계구입	390대	3,200	1,000			1,000	2,200

□ 금후계획

◦ 도비직불금 : 도내소재 농지(0.1 ~ 3.0㏊) 경작농가 직불금 지급

◦ 논 타 작물 재배 : 타 작물 재배 이행점검 이후 지원금 지급

◦ 보조금 집행 완료 후 사업별 사업비 집행 정산

공동브랜드쌀 남원참미 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 추진목표 : 대표 공동브랜드 쌀 육성으로 남원 쌀에 대한 소비자 인식                  제고 및 고가미(고품질) 브랜드로 육성

◦ 사업내용

- 원료곡 생산단지 조성 : 10개단지 342㏊

- 홍보마케팅 : 수도권 대형 매장 특판행사 실시, 소비촉진 행사 실시

- 공동브랜드쌀 생산지원 : 포장지 150,000매, 택배비 50,000건 지원

◦ 사 업 비 : 781백만원(보조 534, 자담 247)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	계	보조금	자부담	비고
계		781	534	247
공동브랜드쌀 원료곡 생산단지 조성	342㏊	393	293	100
공동브랜드쌀 택배비 지원사업	50,000건	180	90	90
공동브랜드쌀 포장재 지원사업	100,000매	60	30	30
공동브랜드쌀 교육·컨설팅 지원	342ha	30	27	3
공동브랜드쌀 홍보마케팅 지원	5회	70	70
공동브랜드쌀 현장수매 지원	342ha	48	24	24

◦ 품종 및 농법 : 신동진, 우렁이 농법

□ 추진실적

◦ 남원참미 원료곡 생산단지 : 10개단지 342㏊, 254백만원(보조 173, 자담 81)

◦ 공동브랜드쌀 포장재 및 택배비 지원 : 240백만원(보조 120, 자담 120)

◦ 교육컨설팅 지원	:  30백만원(보조  27, 자담   3)

◦ 농작물 재해보험 지원	:  12백만원(보조   6, 자담   6)

◦ 홍보마케팅 : 참미 지면광고 및 특판행사 / 20백만원

※ 서울 특판행사 1회 (’18. 4월), 30톤 75백만원 매출

□ 금후계획

◦ 원료곡 생산단지 사업 등 미집행 사업 연내완료추진 : ’18. 9 ~ 11월

◦ 세부사업별 사업비 집행 정산                      : ’18. 12월

고품질 쌀 경쟁력 제고 및 유통기반 확대

□ 개    요

◦ 벼 육묘용 상토 지원 : 9,300㏊, 1,450백만원

◦ 두레 들녘경영체 육성 : 1,000㏊, 200백만원(교육·컨설팅, 현장수매 지원)

◦ 고품질쌀유통시설현대화 : 1개소, 1,010백만원(국비 205, 도비 34.5, 시비 80.5, 자담 690)

◦ 논타작물재배지원 : 614㏊, 2,087백만원(국비 1,670, 도비 125, 시비 292)

◦ 쌀 경쟁력 제고사업 : 4개사업 904백만원(도비 352.4, 시비 352.4, 자담 199.2)

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	계	보조금				자부담	비고
			소계	국비	도비	시비
계		904	704.8		352.4	352.4	199.2
소규모육묘장	17동	170	102		51	51	68
곡물건조기	22대	329.2	198		99	99	131.2
볏짚환원(지력증진)	1,875㏊	374.8	374.8		187.4	187.4
우량종자 채종포	15㏊	30	30		15	15

◦ 벼 종자소독기 지원 : 6대, 14.4백만원(국비 12, 시비 2.4, 자담 9.6)

□ 추진실적

◦ 벼 육묘용 상토 지원 : 7,477농가, 503천포 1,372백만원

◦ 두레 들녘경영체 육성 : 5개소, 746㏊, 131백만원

◦ 쌀 경쟁력 제고사업 : 4개사업 904백만원

(단위 : 백만원)

세부사업명	사업량	계	보조금				자부담	추진실적	비고
			소계	국비	도비	시비
계		904	704.8		352.4	352.4	199.2
소규모육묘장	17동	170	102		51	51	68	16동
곡물건조기	22대	329.2	198		99	99	131.2	22대
볏짚환원(지력증진)	1,875㏊	374.8	374.8		187.4	187.4		추진중
우량종자 채종포	15㏊	30	30		15	15		15㏊

◦ 벼 종자소독기 지원 : 6대, 14.4백만원(국비 12, 시비 2.4, 자담 9.6)

□ 금후계획

◦ ’18년 세부사업별 사업 완료추진	: ’18. 9 ~ 10월

◦ ’18년 세부사업별 보조금 집행 및 사업비 정산	: ’18. 10 ~ 12월

농촌 중심지 활성화

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2021년(계속 ~ )

◦ 위    치 : 6개읍·면[운봉읍(선도지구 1), 일반지구 금지면 외 4지구]

◦ 총사업비 : 36,900백만원(국비 70%, 도비 13.5%, 시비 16.5%)

◦ 사업내용

- 운봉읍 : 하늘아래 운봉마루, 작은목욕탕 정비, 서림공원정비외 3종

- 금지면 : 금지누리센터, 금싸라기마을갤러리, 전원마을체험의집 외 4

- 인월면 : 전선지중화, 가로환경정비, 인월행복센터, 다목적 축구장 외 3

- 산내면 : 살래복합문화센터, 상생광장, 게이트볼장, 귀농인의 집 외 3

- 대강면 : 복지회관 리모델링, 대강면 행복마당 조성, 꽃낭구 정원 외 3

- 사매면 : 사매종합복지센터 리모델링, 혼불교육문화센터 조성 외 3

□ 추진실적

구 분	추진 내용	사업기간	비고
인월면	전선지중화,역참공원,다목적축구장,행복센터완료	14.01 ~ 18.12	100%
운봉읍	기본계획 및 경관계획 용역 추진	16.05 ~ 17.12	20%
	실시설계용역 추진	18.03 ~ 18.11
금지면	시설공사 시행 및 역량강화사업 추진	17.10 ~ 18.03	50%
산내면	기본계획 및 경관계획 용역 추진	17.03 ~ 17.10	20%
	실시설계용역 추진	18.03 ~ 18.10
신규사업	2018년 농촌중심지 활성화사업 선정	17.09	10%
(대강,사매)	기본계획 및 경관계획 용역 시행	18.03 ~ 18.10

□ 금후계획

구 분	추진 계획	사업 기간	비고 (공정율)
인월면	시설물 인수인계 및 사업비 정산	~ 18.12	100%
운봉읍	실시설계(시행계획) 고시 및 사업 추진	18.03 ~ 18.12	20%
	시설공사 및 역량강화 사업 시행	19.01 ~ 20.12
금지면	시설공사 시행 및 역량강화사업 추진	17.10 ~ 19.12	50%
산내면	실시설계 용역 추진	18.03 ~ 18.12	20%
	시설공사 및 역량강화 사업 시행	19.01 ~ 20.12
신규사업	기본계획 및 경관계획 용역 시행	18.03 ~ 18.12	10%
(대강,사매)	실시설계 및 역량강화 시행	19.01 ~ 19.12

중심지 사업현황

(단위 : 백만원)

구분	사업명 (읍면명)	주요 사업 내용	사업비				사업 기간	비고
			계	국비	도비	시비
계	6개소		36,900	25,830	5,535	5,535
농촌중심지활성화사업 (추진 중 4개소)	인월면	전선지중화, 가로환경정비, 인월행복센터, 다목적 축구장, 체육소공원정비, 역참공원, 주민역량교육 등	5,480	3,836	822	822	2013 ~2018	18년완료
	운봉읍	하늘아래 운봉마루, 작은목욕탕 정비, 서림공원정비, 하늘아래 구름길 정비, 바래봉 축제공간 정비, 주민역량강화	8,000	5,600	1,200	1200	2016 ~2020	계속
	금지면	금지누리센터, 금싸라기마을갤러리, 전원마을체험의집, 통학로, 중심지활성화가로조성, 산책로, 주민역량강화 등	5,480	3,836	822	822	2016 ~2019	계속
	산내면	살래복합문화센터, 상생광장, 게이트볼장,귀농인의 집, 가로환경정비, 람천휴양로 정비, 주민역량강화 등	6,000	4,200	900	900	2017 ~2020	계속
농촌중심지활성화사업 (18년 신규 2개소)	대강면	복지회관 리모델링, 대강면 행복마당 조성, 꽃낭구 정원, 섬진로 가로경관 조성, 행복증진프로그램 등	5,993	4,195	899	899	2018 ~2021	신규
	사매면	사매종합복지센터 리모델링, 혼불교육문화센터 조성, 중심지교류마당, 춘향로경관 개선,	5,947	4,163	892	892	2018 ~2021	신규

활기찬 농촌프로젝트 시범사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2018년 (3년)

◦ 위    치 : 남원시 주천면 용담리 및 동부권 일원

◦ 총사업비 : 8,000백만원(국비 5,600 / 시비 2,400)

◦ 사업내용 : 이너뷰티식품 가공시설 (GMP)사업 ,이너뷰티식품 창업지원사업

이너뷰티 신(新)소농 삶터조성 사업, 이너뷰티 식품박람회 등

□ 추진실적

◦ 활기찬 농촌프로젝트 시범(공모)사업 선정	: 16. 06. 16

◦ 기본계획 수립 승인 『농식품부』	: 17. 03. 06

◦ 이너뷰티식품 가공시설 위탁운영자 선정	: 17. 03. 06

- 위탁운영자 : 남원원예농업협동조합(방금원)

◦ 이너뷰티 식품가공시설 시설공사 시행	: 18. 07.

◦ 이너뷰티 창업지원 사업 추진	: 18. 07.

- 창업지원사업(20개소) 맞춤형 컨설팅 및 시설사업지원(설비,HACCP인증 등) /        이너뷰티식품 제품개발 연구용역 추진

□ 금후계획

◦ 이너뷰티 창업지원 및 시설 현대화 사업 추진	: 18. 10. ~ 18. 12.

◦ 신소농 삶터 조성사업	: 18. 10. ~ 18. 12.

◦ 이너뷰티 식품가공(GMP)시설 준공	: 18. 11.

◦ 이너뷰티 식품가공(GMP)시설 시운전 시행	: 18. 12.

◦ 이너뷰티식품 가공시설 운영 조례(안) 제정	: 18. 12.

◦ 이너뷰티 식품가공(GMP)시설 제품 생산	: 19. 01.

창조적 마을 만들기(권역개발)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2004 ~ 2019년 (15년)

◦ 사 업 량 : 7개 권역, 총사업비 35,214백만원

사 업 명	완료지구 (4개소)					진행지구 (2개소)
	혼불문학권역	흥부골권역	요천권역	천왕봉권역	지리산 둘레권역	공안권역	솔바람권역
위 치	서도․인화․ 월평리 5개 마을	성리․월산․구상․일대리 7개 마을	남계․강기리 5개 마을	황벌․도룡․ 사촌리 3개 마을	장안․용궁․호경리 4개 마을	공안․산덕․행정리 8개 마을	신양․만도리 5개 마을
사 업 비	6,009백만원	6,587백만원	4,800백만원	4,900백만원	4,240백만원	4,760백만원	3,918백만원
사업기간	‘04 ~‘08	‘07 ~‘11	‘08 ~‘13	‘09 ~‘14	‘12 ~‘18	‘14 ~‘18	‘15 ~‘19
사업내용	-방문자센터 -전통한증막 -역사관	-방문자센터 -흥부생가 -소공원 정비	-방문자센터 (아리원), -건강관리실 -식품가공공장	-방문자센터 -농산물가공시설 -음식체험관 -바람테마공원 등	-나들락센터 -홍보전시관 -마을회관개축 -용궁천 쉼터 등	-고운향센터 -꾸러미체험장 -두레보금자리	-노노돌봄이 공동생활홈 -호암서원+ 시비공원정비 등

□ 추진실적

◦ 사업완료 : 5개 권역/26,536백만원(사매혼불,아영흥부골,이백요천,보절천황봉주천지리산둘레권역)

◦ 진행지구 : 2개 권역/8,678백만원(운봉공안, 덕과솔바람)

구 분	추진 내용	17년 사업비	비고
운봉 공안	꾸러미체험장, 두레보금자리(행정,공안,삼산) 신축	1,900백만원
덕과 솔바람	노노돌롬이공동생활홈, 마을회관 리모델링(5개소) 등	1,000백만원

□ 금후계획

◦ [공안권역]완료 시설물 점검 및 인수인계 준비	: 18. 10. ~ 18. 11.

◦ [솔바람권역] 노노돌봄이 공동생활홈 임시운영 연장  : 18. 10. ~ 18. 11.

◦ 완료지구 시설물 및 운영 현황 점검	: 18. 10.

창조적 마을 만들기(마을단위)

□ 개    요

사업명	위 치	사업기간	사업비 (백만원)	사업내용	비고
합 계	19개소		9,662
계속사업	11개소		5,253
부서마을 공동(문화․복지)	산동면 부서마을	2015~2016	441	- 짚풀전수관, 갤러리, 짚풀놀이터 등	사업완료
전촌마을 환경(경관․생태)	운봉읍 전촌마을	2015~2016	393	- 소리숲정비, 꽃길조성, 소나무숲 주변정비
원천마을 경제(소득․체험)	산내면 원천마을	2015~2016	483	- 농촌종합체험장 (농사, 야외문화체험 등)
매촌마을 공동(문화․복지)	금지면 매촌마을	2016~2017	466	- 두레사랑방, 매화낙지 쉼터	사업완료
왈길마을 환경(경관․생태)	대산면 왈길마을	2016~2017	500	- 산책로조성, 왈길천꽃길
율동마을 환경(경관․생태)	아영면 율동마을	2016~2017	500	- 명품광장조성, 도토리길조성
중동마을 공동(문화․복지)	주생면 중동마을	2016~2017	500	- 활력충전소 등
서무마을 공동(문화․복지)	인월면 서무마을	2016~2017	470	- 은빛문화관, 다목적공간조성
아곡마을 공동(문화․복지)	아영면 아곡마을	2017~2018	500	- 마을회관리모델링, ICT사업 등	추진 중
회덕마을 공동(문화․복지)	주천면 회덕마을	2017~2018	500	- 공동생활홈, ICT사업 등
등구마을 환경(경관․생태)	산동면 등구마을	2017~2018	500	- 등구꽃길 조성, 구림정 앞뜰공원 조성
신규사업	8개소		4,409
매요마을 공동(문화․복지)	운봉읍 매요마을	2018~2019	498	- 두레사랑복지센터, ICT사업 등	기본계획 및 실시설계 추진 중
외인마을 공동(문화․복지)	아영면 외인마을	2018~2019	496	- 종합복지센터, ICT사업 등
두락마을 공동(문화․복지)	아영면 두락마을	2018~2019	500	- 종합복지센터, ICT사업 등
하송마을 공동(문화․복지)	주천면 하송마을	2018~2019	500	- 하송 한마음광장, 마을회관 정비 등
권포마을 환경(경관․생태)	운봉읍 권포마을	2018~2019	500	- 돌장승테마공원, 마을돌담정비 등
상신마을 환경(경관․생태)	사매면 상신마을	2018~2019	500	- 솔향기 공원조성, 이팝 풍년거리조성 등
두곡마을 환경(경관․생태)	송동면 두곡마을	2018~2019	460	- 역사문화공원 조성 꽃길조성 등
대지마을 (마을종합)	주생면 대지마을	2018~2020	955	- 마을종합 복지관, 생태연못 복원 등

□ 추진실적

◦ 2015 ~ 2016년 사업(3개소) : 사업완료

- 부서마을 : 짚풀공예 전수관 신축 , 역량강화 교육	: 17. 10.

- 전촌마을 : 소리숲, 꽃담및테마조형물, 소공원 조성 착공	: 17. 10.

- 원천마을 : 농촌종합 체험장 조성 착공	: 17. 12.

·시설내용 : 부지조성(2,675㎡), 주차장16대, 화장실, 샤워장, 취사장 등

◦ 2016 ~ 2017년 사업(5개소) : 사업완료

- 매촌·왈길·율동·중동·서무마을

·실시설계 및 시설공사 추진(마무리)	: 17. 02. ~ 17. 12.

·중동 / 서무마을 역량강화 사업 추진	: 18. 02. ~ 18. 12.

◦ 2017 ~ 2018년 사업(3개소) : 진행지구

- 아곡·회덕·등구마을

·시설공사 추진	: 18. 06. ~ 18. 11.

·마을 역량강화 사업 추진	: 18. 07. ~ 18. 12.

◦ 2018 ~ 2019년 사업(8개소) : 진행지구

- 매요·외인·두락·하송·권포·상신·두곡·대지마을

·『농식품부』신규 공모사업 선정	: 17. 09.

·기본계획 및 실시설계수립 용역 시행	: 18. 03. ~ 18. 12.

□ 금후계획

《계속사업》

◦ 2017 ~ 2018년 사업(3개소 : 아곡, 회덕, 등구마을) 시설공사 추진

- 아곡마을/ 공동생활홈, 꽃길, 영상보안ICT사업, 지역역량강화 : 18. 12.(준공예정)

- 회덕마을/ 은빛문화복지센터, 영상보안장비설치, 역량강화 : 18. 12.(준공예정)

- 등구마을/ 등구꽃길, 그림정앞뜰공원, 역량강화	: 18. 11.(준공예정)

《신규사업》

◦ 2018 ~ 2020년 사업(8개소) : 매요, 외인, 두락, 하송, 권포, 상신, 두곡, 대지

- 기본계획 도협의 및 고시	: 18. 10. ~ 18. 12.

- 시행계획(실시설계) 용역 준공	: 18. 12.

- 시설공사 발주(역량강화사업 추진)	: 19.  1. ~ 19. 12.

소규모 경지정리사업

□ 개    요

◦ 사업내용 : 경지정리사업

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년(4년간)

◦ 위    치 : 남원시 일원

◦ 총사업비 : 10지구 119ha / 8,400백만원(ha당 70백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기 추진	2018	2019	ˊ20년 이후	비 고
경지정리사업	8,400	0	500	1,700	6,200

※ 2018 사업 : 가을착수분 3개지구 42ha(갈촌, 포암, 화정)실시설계 및                    공사 착수 (정지작업) / 500백만원(국 85, 도 11, 시 404)

□ 추진실적

◦ 사업지구 일제 재조사 실시(10지구 119ha)	: ˊ18. 4. ~ 7.

◦ 가을착수 지구 (갈촌,포암,화정) 실시설계용역시행    : ˊ18. 8. ~

- 문화재지표조사, 주민설명회, 시행계획수립, 승인

□ 금후계획

◦ 사업발주(가을착수)	: ˊ18. 11.

- 토공 및 정지작업 등

◦ 준공(2019년 봄마무리), 모내기 이전 완료         : ˊ19. 5.

낙덕지구 지표수보강개발

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4년간)

◦ 위    치 : 주천면 배덕리 일원

◦ 사 업 량 : 낙덕제 보강 1식, 용수로 4조 2.4km 등

◦ 수혜면적 : 15.6ha

◦ 총사업비 : 7,000백만원[국비 4,900(70%), 시비 2,100(30%)]

- ‘18년 예산 : 2,573백만원(국비 1,801, 시비 772)

재 원 별	사업비 (백만원)				비 고
	총사업비	기투자	2018	2019이후
계	7,000	428	2,573	3,999
국 비	4,900	300	1,801	2,799
시 비	2,100	128	772	1,200

□ 추진실적

◦ 기본조사 및 실시설계용역 발주	: ˊ17. 3.

◦ 전략 및 소규모환경영향평가용역 등 발주 및 착수	: ˊ17. 7.

◦ 주민설명회 개최	: ˊ17. 11.

◦ 전략 및 소규모환경영향평가용역 완료	: ˊ18. 5.

◦ 낙덕지구 지표수보강개발사업 원가심사 완료	: ˊ18. 6. ~ 7.

◦ 시⇒한국농어촌공사 위(수)탁 협약체결	: ˊ18. 8.

◦ 낙덕지구 지표수보강개발사업 시행계획공고	: ˊ18. 8. 31. ~ 9. 30.

□ 금후계획

◦ 시행계획수립, 승인	: ˊ18. 10.

◦ 전체공사 발주 및 착공	: ˊ18. 10.

지리산 구룡계곡 흙탕물 저감사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2020년(5년간)

◦ 위    치 : 주천면 덕치리 558번지일원

◦ 사 업 량 : 수처리시설 1식(침사지 : 11,000톤/일)

◦ 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 시비 2,500)

- `18년 예산 : 1,000백만원(국비 500, 시비 500)

재 원 별	사업비 (백만원)				비 고
	총사업비	기투자	2018	2019년이후
계	5,000	2,166	1,000	1,834
국 비	2,500	1,083	500	917
시 비	2,500	1,083	500	917

□ 추진실적

◦ 현지 여건조사 분석(수질검사 등), 타당성조사 연구용역실시 : ˊ15. 3. ~ 6.

◦ 예산확보 및 사업확정	: ˊ15. 9.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ˊ16. 6. ~

※ 한국환경공단과 용지보상, 공사추진 등 상호 병행·협력 추진

◦ 주민 설명회	: ˊ16. 12. 15.

◦ 토지매입 관련 토지주 협의	: ˊ17. 2. 2.

◦ 타지역 선진지 견학(홍천, 양구, 인제)	: ˊ17. 4. 6.

◦ 도시계획 시설결정 용역착수	: ˊ17. 11. 6.

◦ 도시계획 시설결정 입안신청(남원시)	: ˊ18. 5. 21.

◦ 기본 및 실시설계 설계검토중간 자문회의<서울역>	: ˊ18. 8. 24.

[주관 : 한국환경공단, 자문위원 6명(한동대교수 외 5)]

□ 금후계획

◦ 도시계획시설 결정(용지매입도 작성) 및 실시계획인가	: ˊ18. 10.

◦ 토지매입 추진	: ˊ18. 11. ~ ˊ19. 3.

◦ 기본 및 실시설계 용역 완료	: ˊ18. 12.

◦ 공사 발주 및 착공 시행(용지매입 80%이상 시 공사발주) : ˊ19. 4. ~ ˊ20. 12.

안전영농 환경조성

□ 개    요

◦ 사업내용 : 일반농로 및 기계화경작로 포장

◦ 사업기간 : 1995년 ~ 계속

◦ 사업대상 : 20개 읍면동(동충·죽항·금동 제외)

◦ 총 계 획 : 1,785km / 2,173억원(2017년도 전수조사 포함)

- ‘17년까지 : 1,556km / 1,811억원(포장율 87.2%)

- ‘18년사업 :   84km / 117억원(지특 7.7억원, 도비 1.65억원, 시비 107.65억원)

(단위 : km , 억원)

구 분		총 계		기추진		2018		‘19이후		포장율 (‘17까지)
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합 계		1,785	2,173	1,556	1,811	84	117	145	245	87.2
일반농로		1,285	1,648	1,126	1,364	76	106	83	178	87.6
기계화 경작로	계	500	525	430	447	8	11	62	67	86.0
	시 관 리	220	219	214	210	3	4	3	5	97.3
	농촌공사	280	306	216	237	5	7	59	62	77.1

□ 추진실적

◦ ‘18년 농로 확포장 사업예산 재배정추진	: ‘18. 1.

◦ 실시설계 용역 추진	: ‘18. 1. ~ 3.

◦ 상반기 사업완료(L=54km)	: ‘18. 3. ~ 6.

◦ 하반기 사업추진(L=30km)	: ‘18. 7. ~

◦ ‘19년도 대상 사업지구 조사	: ‘18. 8. ~ 9.

□ 금후계획

◦ 하반기 사업 완료(동절기 이전 완료)              : ‘18. 11월까지

안전농업 기반확충

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 용배수로 현대화사업

◦ 사업기간 : 1995년 ~ 계속

◦ 사업대상 : 20개 읍면동(동충·죽항·금동 제외)

◦ 총 계 획 : L=1,213km / 1,235억원(2017년 전수조사 포함)

- ‘17년까지 : L=819km / 841억원(현대화율 67.5%)

- ‘18년사업 : L=116km / 104억원(시비, 현대화율 77.0%)

(단위 : km , 억원)

구 분	총 계		기추진		2018		‘19이후		현대화율 (‘17까지)
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
용배수로	1,213	1,235	819	841	116	116	278	278	67.5%

□ 추진실적

◦ ‘18년 농로 확포장 사업예산 재배정추진	: ‘18. 1.

◦ 실시설계 용역 추진	: ‘18. 1. ~ 3.

◦ 상반기 사업완료(L=72km)	: ‘18. 3. ~ 6.

◦ 하반기 사업추진(L=44km)	: ‘18. 7. ~

◦ ‘19년도 대상 사업지구 조사	: ‘18. 8. ~ 9.

□ 금후계획

◦ 하반기 사업 완료(동절기 이전 완료)              : ‘18. 11월까지

재해위험저수지 정비

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 계속

◦ 위    치 : 운봉읍 행정리 등 9개소

◦ 총 계 획 : 9개지구/ 19,926백만원(국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)

- 완    료 : 4개지구/ 6,442백만원(청계제, 방평제, 내기제, 숲멀제)

◦ 추진계획

- ˊ18년사업 : 5개지구/ 3,940백만원(국비 1,970, 도비 788, 시비 1,182)

지 구 별		위 치	사업개요	사업비(백만원)				사업기간
				계	기투자	2018	‘19이후
계		9개지구		19,926	8,518	3,940	7,468	`15 ~ `21
완료	소계	4개지구	-	6,442	6,442	-	-
	청계제	아영청계	시설보강1식	2,450	2,450	-	-	`15 ~ `17
	방평제	수지호곡	시설보강1식	1,000	1,000	-	-	`15 ~ `17
	내기제	이백강기	시설보강1식	1,000	1,000	-	-	`15 ~ `18
	숲멀제	운봉권포	시설보강1식	1,992	1,992	-	-	`15 ~ `18
계속 (추진중)	소계	3개지구	-	7,984	2,076	3,820	2,088
	행정제	운봉행정	시설보강1식	2,618	600	1,360	658	`17 ~ `19
	용궁2제	주천용궁	시설보강1식	3,726	876	1,800	1,050	`17 ~ `19
	입촌2제	이백과립	시설보강1식	1,640	600	660	380	`17 ~ `19
신규	소계	2개지구	-	5,500	-	120	5,380
	감동제	대산풍촌	시설보강1식	2,500	-	60	2,440	`18 ~ `21
	왈길제	대산길곡	시설보강1식	3,000	-	60	2,940	`18 ~ `21

□ 추진실적

◦ 행정,용궁2제,입촌2제 공사착수	: ˊ17. 11.

◦ 신규지구(감동제,왈길제) 설부설계 용역착수	: ˊ18. 2.

◦ 용궁2제, 행정제, 입촌2제 1차분 완료                  : ˊ18. 3. ~ 6.

- 용궁2제, 행정제(여방수로), 입촌2제(여방수로, 복통)

◦ 용궁2제, 행정제, 입촌2제 2차분 추진(공정 65%)        : ˊ18. 6.

□ 금후계획

◦ 용궁2제, 행정제 (제방보장, 준설 등), 계속사업         : ˊ18. 11.

◦ 입촌2제(제당보강, 준설 등), 준공	: ˊ18. 11.

※ 감동제, 왈길제(행정안전부 재난경감과 사전설계심의, ˊ18. 10.)

농촌관광거점마을 육성

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 전촌 동편제마을 일원

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2018년(4년)

◦ 총사업비 : 3,000백만원(도지특 1,500, 시비 1,500)

◦ 연도별 투자

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2015	2016	2017	2018
총 계	3,000	352	1,106	966	576

◦ 사업내용 : H/W(4종) 2,712백만원, S/W(19종) 287백만원

- 전촌마을 : 농촌관광 거점센터(숙박동), 커뮤니터존(식당, 체험공간 등)

- 비전마을 : 야외공연장(데크신설), 화신마을 : 북카페(기존창고 리모델링)

- 주민역량강화 및 콘텐츠개발 : 체험지도사, 실무자격증, 향토음식개발 등

□ 추진실적

구 분	사 업 내 용		추진상황	공정률(%)	비고
H/W	숙박체험동	․ 3동, 12실(571㎡)	․ 내부공사 중	70
	커뮤니티동	․ 1동(251㎡)	․ 내부공사 중	70
	화신마을	․ 북카페(84㎡)	․ 기존 시설물 철거	20
	비전마을	․ 야외공연장(63㎡)	․ 부지정비	20
S/W	주민역량강화 및 마을콘텐츠개발	․ 체험지도사양성 외 10식 완료		9식 추진중

□ 쟁점 및 대책

◦ 예산(1억원) 부족에 따른 조경공사 문제

- 2018년 도 농촌관광거점마을지침에 따라 조기 준공 등 사업성과가        우수한 마을에 인센티브 계획이 있어 올해 완공 목표로 사업 추진

□ 금후계획

◦ 거점센터조성 준공                            : ‘18. 12.

◦ 시범운영                                     : ‘19. 01. ~ ‘19. 03.

◦ 본격운영 및 준공식                           : ‘19. 06.

생생마을 만들기

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월

◦ 사업목표 : 삼락농정 구현을 위해 주민 주도의 마을만들기 사업 추진으로 농촌마을 공동체의 활성화 도모

◦ 총사업비 : 300백만원(도지특 100, 도비 34, 시비 166)

◦ 사업내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비	사업량	사 업 내 용
계(5개)	300
기 초 단 계	30	6마을	·마을발전계획수립, 주민주도 소규모사업 실천 활동
사후관리단계	100	2개	·가공시설 신규‧기존 시설개보수
중간지원조직	100	1식	·조직운영 및 마을만들기사업지원 ·농촌관광, 역량강화 등
농촌과소화 대응인력육성	58	1식	·과소화, 저출산, 고령화 대응인력 육성
도농교류 산촌마당캠프	12	3마을	·과소화마을 캠핑을 통한 주민교류의 장

□ 추진실적

◦ 기초단계 : 6마을(화신, 정충, 강석, 사창, 의지, 내동) 완료

◦ 사후관리 : 2개소(상신 : 설계 중 / 노봉마을 : 도 공모 신청)

◦ 중간지원조직 : 마을사업 지원, 누비고사업 추진, 역량 강화 등

◦ 농촌과소화 : 소액마을사업(5마을-보조결정), 과소화현황조사 등

◦ 산촌마당캠프 : 2마을(추어,장평) 완료, 1마을(산촌) 보조결정

□ 금후계획

◦ 사업 추진	: ˊ18. 11월

◦ 2019 예산 확보	: ˊ18. 12월

2018. 10.

2018년 주요업무 추진실적

건   설   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2018년 주 요 업 무  결산

□ 2018년 주요업무 추진실적

◦ 2018 ~ 2019 도로 설해대책

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 시도 확포장

◦ 농어촌도로 확포장

◦ 통행불편 마을 진입로 정비

◦ 위험도로 선형 개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 람천 고향의 강 정비

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성

◦ 소하천 정비

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 하천 유지관리사업

◦ 요천 내 수경시설(분수)설치

일  반  현  황

□ 기    구

												건 설 과 장
												진 영 신
건설행정담당										도로담당															하천담당
정 덕 량										성 길 경															백 강 규
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속										읍면시도 확․포장 사업 농어촌도로 확․포장 사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지관리 사업															치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천 점․사용 허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	40	1	3	7	4	6	▪청원경찰 : 7 ▪공 무 직 : 12
현 원	36	1	3	8	3	4	▪청원경찰 : 5 ▪공 무 직 : 12 - 휴직(1) 포함
증 감	△4	-	-	1	△1	△2	△2(청원경찰)

□ 도로 현황

(2017.12.31. 기준 / 단위 : km)

구 분	노선수	총연장	포 장	포장률(%)	비 고
계	841	1,387.7	754.1	54.3
고 속 국 도	2	69.0	69.0	100.0
국 도	5	123.8	123.8	100.0
국가지원지방도	2	47.7	47.7	100.0	전북 98.2%
지 방 도	7	120.2	107.0	89.0	전북 79.2%
시 도	472	174.4	95.4	54.7	전북 67.8%
읍면지역시도	22	215.1	130.6	60.7	전북 54.9%
농 어 촌 도	331	637.5	180.6	28.3	전북 34.3%

□ 하천 현황

(2017.12.31. 기준 / 단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	389	675.4	1,120.6	815.4	366.24	72.7
국가하천	2	39.1	40.1	40.1		100.0
지 방 하 천	40	246.7	392.9	317.4	75.54	80.8	전북 78.5%
소 하 천	347	389.6	687.6	457.9	290.7	66.6	전북 36.5%

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 시민만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 신속하고 완벽한 제설작업으로 도로이용불편 최소화(20일) - 도로 갓길 및 주요하천 제방, 둔치길 제초작업 추진(4회) - 민원사항 즉시처리 및 시설정비 예산우선투자로 도로유지관리 만전 ·읍면지역시도 19건, 농어촌도로 12건, 시가지 법정도로 28건 / 6,090백만원 ◦ 시민편의를 위한 생활환경·관광 인프라 구축 - 건지~갈계 간(22억원), 덕과 고정마을(1억원), 수지 호곡 위험도로(4억원) - 주민 불편사항(시정 설명회, 월례회의 지속 건의사항) 해결을 위한 전라북도 도로관리사업소 사업 지속 건의 ⇒ 추진사업 : 지방도 위험도로 구조개선사업(4개지구 / 1,610백만원), 지방도 730호선(송동 태동) 2019년도 4억원 요구, 지방도 721호선(보절 괴양) 위험도로 선형개량 특교세 신청 - 생태하천 및 지방하천 정비사업 완료 ·광치천 생태하천 복원사업 (향교~용정 일원 / L=2.3㎞ / 19,666백만원) ※ 광치천 생태하천 공중 화장실 설치, 유지관리(환경정비) 작업 ·람천 고향의 강 정비사업 준공 (운봉 화수~행정/ L=5.3㎞ / 20,221백만원) ·갈치천 지방하천 정비사업 준공 (식정동~상갈치/ L=4.3㎞ / 8,051백만원) ◦ 지방재정확충을 위한 국가예산확보에 총력 - 사업타당성 재검토 요청 등 사업우선순위 반영 위해 적극대응 ※ 고속도로 춘향휴게소 설치, 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) ⇒ 정읍~남원간 국도, 국도 24호선(이백~운봉), 국지도 37호선(인월취암 ~ 자래), 국도 19호선(고죽~번암) 등 - 다산천 지방하천 정비사업 ‘18년 사업비 추가확보(국400, 도160, 시240백만원) ◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업 추진에 따른 공감대 형성 -‘18년 5월 3일 익산청 하천계획과장 현지 방문 점검 ※ 치수 안전성 확보를 위한 축제 및 보축, 낙차공 정비 등 실시설계 반영 - 요천(국가하천) 도통동 인도교 좌안 수변 생태 레저공원지구 하천구역 지정 애로 ※ 익산청에서 시행 중인「요천권역 하천기본계획」치수타당성 분석 결과 제방보축 또는 홍수관리구역 지정을 검토하고 있어 지속적인 대응 필요

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 24개 지구 / 8,400백만원

(24개 지구 중 3개 지구 완공) - 추진공정 34%

◦ 읍면지역시도 확포장 4개 지구	/ 4개 지구 추진(L=7.70km/2,000백만원)

◦ 농어촌도로 확포장   6개 지구	/ 1개 지구 완공(L=8.55km/3,300백만원)

◦ 통행불편 마을진입로  9개 지구	/ 1개 지구 완공(L=5.24km/1,400백만원)

◦ 위험도로 선형개량   5개 지구	/ 1개 지구 완공(L=1.95km/1,700백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 9개 분야 / 65개소 / 7,759백만원

(65개 지구 중 45개 지구 완공) - 추진공정 52%

◦ 읍면지역시도 유지관리사업 추진	: 19개소 / 1,300백만원

◦ 농어촌도로 유지관리사업 추진	: 12개소 / 1,500백만원

◦ 동지역 도로 유지관리사업 추진	: 29개소 / 2,734백만원

◦ 주천 용궁마을 스노우멜팅 설치 추진	: 1개소  /    181백만원

◦ 노암4가 회전교차로 설치 추진	: 1개소  /     400백만원

◦ 산내 달궁마을 노후 인도 정비 추진	: 1개소  /   1,000백만원

◦ 주천 회덕마을 세월교 정비 추진	: 1개소  /   600백만원

◦ 남원대교~동림교 중앙분리대 설치 추진	: 1개소  /    44백만원

◦ 도로 제설작업(2017~2018)	: 20일(57개노선, 431.5㎞)

□ 재해 사전예방을 위한 하천 정비 – 10개 지구 / 16,030백만원

(10개 지구 중 2개 지구 완공) - 추진공정 60%

◦ 지방하천 정비(갈치천,풍천,송치천,다산천)	: 4개소 /  3,998백만원

◦ 람천 고향의 강 정비	: 1개소 /    477백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성	: 1개소 /  1,000백만원

◦ 소하천 정비(고평천, 당동천)	: 2개소 /  2,066백만원

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역	: 1식  /   1,137백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천, 기성제, 수경시설 등)	: 1식  /   7,352백만원

2018년 주요업무 추진실적

2018~2019 도로 설해대책

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2018. 11. 15. ~ 2019. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 26명(도로보수원 10, 운전원 10, 기타 6)

◦ 제설 차량 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1〕

◦ 제설 장비 : 241대

- 자체 보유 : 제설기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

살포기  12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

-  읍면동(19) : 제설기 217대(트랙터용 214/ 1톤용 3)

◦ 제설 자재 : 염화칼슘 261톤 / 소금 2,104톤 / 친환경 제설제 112톤

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 6명), 각 읍면동사무소

□ 추진실적(2017~2018)

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재구입	: `17. 11.

◦ 도로제설작업 추진(20회)	: `17. 11. ~ `18. 3.

- 대설주의보 4회, 한파주의보 4회, 누적적설량 : 34.6㎝ (평균 4.9㎝)

- 투입장비 : 13대〔15톤 6(임차4), 5톤 1, 1톤 5(임차3), 굴삭기 1〕

□ 금후계획

◦ 5톤트럭 살포기 및 제설기 구입	: 10월 ~

◦ 읍면동 트랙터용 제설기 및 원터치 보급	: 10월

- 제설기 10대 / 원터치 47대

◦ 미끄럼주의표지판(22개) 및 모래주머니(20,000매) 설치	: 10월 ~

◦ 임차장비 용역시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: 11월 ~

◦ 상황실[건설과(2개조 6명), 읍면동] 운영	: 11월

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍·면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

- 읍면지역시도 : 22개 노선, 215.1㎞ / 농어촌도로 : 331개 노선, 637.5㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2019년

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 4. ~ `19. 9.

- 상위계획 검토 및 실과소 자료 수집 / 교통량 조사 실시

- 시군도 및 농어촌도로 각 노선별 현장조사(연장, 도로폭, 시설물 조사 등)

- 도시 교통 현황 분석 및 실태 조사(실과소 수집 자료와 현장 점검)

◦ 기본계획 변경 용역 중간보고	: `18. 9.

□ 금후계획

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 10. ~ `19. 4.

- 주요 도로 운영관리 체계 개선 방안 제시

(ex. 교육청사거리, 정령치 구간, 인접시군과 연계 도로 구축 방안 등)

- 도로 현장 여건 변화 검토 및 수요 예측 조사

- 최적 도로망 체계 선정 및 연차적 투자계획 수립

◦ 관련부서(기관) 및 인접 지자체 협의	: `18. 10. ~ 11.

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행	: `18. 11. ~ `19. 3.

◦ 기본계획(안) 관계기관 협의	: `19.  4.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: `19.  5.

읍면지역 시도 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 18개 사업 / 35.06㎞ / 64,930백만원

◦ 기 투 자 : 14개 사업 / 27.36㎞ / 46,530백만원

◦ 2018시행 :  4개 사업 /  7.70㎞ / 18,400백만원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2021년(16개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합 계	4개사업	7.7	18,400	2,200	2,000	14,200	22.8
화정~대율	사매면	1.1	2,400	1,800	600	-	100	‘16 ~ ‘18
부석~오촌	송동면	2.6	5,000	100	300	4,600	8.0	‘17 ~ ‘21
오리정~상신	사매면	1.5	2,300	100	300	1,900	17.4	‘17 ~ ‘20
평촌~강기	이백면	2.5	8,700	200	800	7,700	11.5	‘17 ~ ‘21

※ 전체 현황 : 22개 노선 / 215.1㎞ 중 130.6㎞ 완료(포장률 60.7%, 전북 54.9%)

□ 추진실적

◦ 화정~대율   : 2차분 준공(8.21.), 3차분 공사중(포장공, 부대공) / 공정률 80%

◦ 부석~오촌   : 실시설계완료(`18.1.), 용지보상 추진(8.29.~)

◦ 오리정~상신 : 실시설계완료(`18.1.), 관련기관 협의(산지전용․하천점용/`18.6.)

◦ 평촌~강기   : 실시설계용역, 관련기관 협의(소규모 환경영향평가, 비관리청 공사 허가)

□ 금후계획

◦ 화정~대율	: 전체분 완공(아스콘 포장, 부대공) / `18. 11.

◦ 부석~오촌   : 도로구역 결정, 용지보상 추진

◦ 오리정~상신 : 도로구역 결정, 용지보상 추진

◦ 평촌~강기   : 도로구역 결정, 용지보상 추진

농어촌도로 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 21개 사업 / 23.01㎞ / 40,824백만원

◦ 기 투 자 : 15개 사업 / 14.46㎞ / 25,224백만원

◦ 2018시행 :  6개 사업 /  8.55㎞ / 15,600백만원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2021년(16개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합 계	6개사업	8.55	15,600	2,700	3,300	9,600	38.5
건지~갈계	인월,아영	1.40	2,200	1,800	400	-	100	‘16 ~ ‘18
행 덕 선	운봉읍	1.25	1,600	300	800	500	68.7	‘17 ~ ‘19
장항교 재가설	산내면	0.30	2,800	500	1,800	500	82.1	‘17 ~ ‘19
도 용 선	주생면	1.00	1,500	100	200	1,200	20.0	‘17 ~ ‘20
상 황 선	산내면	0.60	1,500	-	50	1,450	3.3	‘18 ~ ‘20
견 두 선	수지면	4.00	6,000	-	50	5,950	3.3	‘18 ~ ‘20

※ 전체 현황 : 331개 노선 / 637.5㎞ 중 180.7㎞ 완료(포장률 28.3%, 전북 34.3%)

□ 추진실적

◦ 건지~갈계	: 전체분 완공(`18.6.14.)

◦ 행 덕 선	: 용지보상(50% 완료) 및 공사착공(`18.1.3.)	/ 공정률 25%

◦ 장항교 재가설	: 1차분 준공(6.18.), 2차분 추진(구조물공)	/ 공정률 60%

◦ 도 용 선	: 실시설계용역 완료(5.18.), 보상계획 통보

◦ 상황선 및 견두선 : 실시설계용역 착수(`18.9.) ※ 1회추경 예산 확보사업

□ 금후계획

◦ 행 덕 선	: 1차분 준공(10.4.), 2차분 공사 추진(배수공, 포장공)

◦ 장항교 재가설 : 2차분 공사 추진(구조물공, 교량공), 3차분(최종분) 발주

◦ 도 용 선	: 감정평가․용지보상 협의, 농어촌도로 노선 지정(변경) 절차 이행

◦ 상황선 및 견두선 : 주민 설명회 및 실시설계용역 추진

통행불편 마을 진입로 정비

□ 개    요

◦ 2018 시행 : 9개 사업 / 5.24㎞ / 1,400백만원

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합 계	9개사업	5.24	6,750	1,000	1,400	4,350	35.6
고정마을	덕과면	0.01	100		100		100	‘17 ~ ‘18
계산마을	이백면	0.33	450		450		100	‘17 ~ ‘18
내황마을	보절면	0.80	1,600	100	300	1,200	25.0	‘17 ~ ‘19
신지마을	아영면	0.35	500	100	400		100	‘17 ~ ‘18
중군마을	인월면	0.80	1,400	800	-	600	57.1	‘17 ~ ‘19
배산마을	덕과면	0.40	600		50	550	8.3	‘18 ~ ‘19
안대실마을	대산면	0.75	1,300		50	1,250	3.9	‘18 ~ ‘20
대치마을	대강면	0.30	400		25	375	6.2	‘18 ~ ‘19
방촌마을	금지면	1.50	400		25	375	6.2	‘18 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 덕과 고정마을 : 공사 완공(`18.7.16.)

◦ 이백 계산마을 : 감정평가 및 용지보상 추진(7.27.~) / 보상률 6%

◦ 대강 대치·금지 방촌마을 : 실시설계용역 착수(8.22.) ※ 1회 추경 예산

◦ 덕과 배산·대산 안대실마을 : 실시설계용역 추진

◦ 보절 내황마을 : 설계용역 완료(`18.5.18.), 관련기관 협의(소규모 환경영향평가)

◦ 아영 신지마을 : 보완설계 용역 추진, 주민 설명회 2회 실시(7.23., 8.21.)

◦ 인월 중군마을 : 공사 추진(토공) / 공정률 10%

□ 금후계획

◦ 이백 계산마을 : 주민 설명회 및 용지보상 추진, 공사 발주

◦ 보절 내황마을 : 용지보상 추진

◦ 대강 대치·금지 방촌마을 : 실시설계용역 완료, 공사 발주

◦ 덕과 배산·대산 안대실마을 : 농어촌도로 노선 지정(변경) 절차, 주민설명회․용지보상 추진

◦ 아영 신지마을 : 원가심사 및 용지보상, 공사 발주(`18.10.)

◦ 인월 중군마을 : 1공구(L=0.6㎞) 공사 완료(`18.12.)

위험도로 선형 개선

□ 개    요

◦ 2018 시행 : 5개 사업 / 1.95㎞ / 1,700백만원

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합 계	5개사업	1.95	2,700	550	1,700	450	83.3
수지 호곡 (군도 5호선)	수지면	0.30	400	100	300		100	‘17 ~ ‘18
주생 상동 (농어촌도로 311호)	주생면	0.30	500	100	400		100	‘17 ~ ‘18
이백 척내선 (농어촌도로 105호)	이백면	0.55	600	300	300		100	‘17 ~ ‘18
지리산IC ~아영면사무소 (군도 29호선)	아영면	0.65	900	50	400	450	50	‘17 ~ ‘19
주천 가송 (시의 시도)	주천면	0.15	300		300		100	‘18

□ 추진실적

◦ 수지 호곡	: 공사 완료(`18.7.13.)

◦ 주생 상동	: 토지보상(70% 완료) 및 공사추진(4.2.) / 공정률 10%

◦ 이백 척내선	: 공사 추진(배수공, 구조물공, 포장공) / 공정률 80%

◦ 지리산IC~아영 : 1차분 공사 착수(7.10.), 보상계획 통보(8.27.)

◦ 주천 가송	: 실시설계용역 착수(`18.8.29.) ※ 1회 추경 예산

□ 금후계획

◦ 주생 상동	: 공사 완료(`18.12.)

◦ 이백 척내선	: 공사 완료(`18.11.)

◦ 지리산IC~아영 : 3공구 공사 완료(`18.12.) / 1,2,4공구 : 2019 시행

◦ 주천 가송	: 원가심사 및 공사 발주(`18.10.)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 7,759백만원(국비 41, 도비 522, 시비 6,596, 특교세 600)

사 업 명		위 치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			65개 지구	7,759
	소 계		60개 지구	5,534
	읍면지역 시도	관내	22개 노선, L=215.1㎞	1,300
	농어촌도로	관내	331개 노선, L=637.5㎞	1,500
	법정도로 유지관리	관내	시의 국도․지방도․시도	2,734	도 36 시 2,698
주천 용궁마을 스노멜팅 설치		주천면	도로 스노우멜팅 L=150m	181	국 41 시 140
노암4가 회전교차로 설치		노암동	회전교차로 설치 1식	400	도 200 시 200
산내 달궁마을 노후 인도정비		산내면	인도데크 설치 L=270m	1,000	도 300 시 700
주천 회덕마을 세월교 정비		주천면	세월교 교량 재가설 1식	600	특 600
남원대교~동림교 중분대 설치		죽항동	화단형 중앙분리대 L=250m	44	도 22 시 22

□ 추진실적

◦ 도로 유지관리사업 중점 추진(60개지구 / 3,594백만원)	: `18. 1. ~ `18. 9.

◦ 위험교량 정밀점검 및 유지관리사업 추진	: `18. 4. ~ `18. 9.

- 왕정교 정밀점검 밤치육교 외 3개교 유지보수, 승사교 외 5개소 정밀점검 완료

◦ 실시설계용역 추진 : 주천 회덕(`18.5.~ ), 주천 용궁 스노멜팅(`18.6.~)

◦ 공사 완료 : 남원대교~동림교(`18.5.), 노암 4가 회전교차로(`18.9.)

◦ 공사 추진 : 산내 달궁마을 노후 인도정비(`18.9.10. 착수)

□ 금후계획

◦ 공사완공(6개 지구)                               : ‘18. 10. ~ 11.

- 서남원I.C 진입로, 지방도 721(갈치동) 위험도로, 산동 부서소하천,           대강 양촌마을 진입로, 괴양교 재가설

◦ 도로 유지관리(교량, 안전시설물, 노면 재포장, 배수개선 등) : ‘18. 10. ~ 12.

- 읍면지역시도, 농어촌도로, 법정도로 관리(3개지구) / 1,940백만원

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 22개지구 / 105.93㎞ / 224,463백만원

- 완료지구 : 11개지구 / 51.89㎞ /  96,924백만원

- `18년사업 : 4개하천 5개지구 / 3,998백만원 [국비 2,069, 도비 800, 시비 1,129]

◦ 위    치 : 도통동 갈치천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

하 천 별	지 구 별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2018	2019이후
합 계	4개하천	13.55	59,422	21,403	3,998	34,021	42
갈치천	소 계	4.28	8,051	7,353	698	-	100	`12 ~ `18
	갈치지구	1.79	5,193	5,193	-	-	100	`17년 준공
	식정지구	1.61	2,307	2,097	210	-	100	`16 ~ `18
	상갈치지구	0.88	551	63	488	-	100	`17 ~ `18
풍 천	소 계	5.53	37,351	12,050	1,000	24,301	35	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961	-	-	100	`17년 준공
	풍천지구	4.65	30,390	5,089	1,000	24,301	20	`18 ~ `22
송치천	송치지구	2.04	9,466	2,000	1,500	5,966	37	`16 ~ `20
다산천	다산지구	1.70	4,554	-	800	3,754	18	`18 ~ `22

□ 추진실적

◦ 갈치천 (식정) : 호안공 L=0.34㎞, 교량 1개소, 취입보 1개소	/ 공정률 100%

◦ 풍  천 (풍천) : 통합설계 및 도 지방건설 기술심의 완료	/ 공정률  30%

◦ 송치천 : 교량 2개소, 배수관 6개소, 개거 L=0.187㎞	/ 공정률  40%

◦ 다산천 : 실시설계용역 착수(현황 및 지반조사 완료	/ 공정률  20%

□ 쟁점 및 대책

◦ 풍천 지방하천 정비사업(인율·두락·의지지구) ‘18년 명시이월사업(35억원)으로 연내 시설공사 발주가 시급함

□ 전북도 지방건설기술심의 (‘18.9.11.)에 따른 조건부 심의 내용 보완 완료 후 10월 중 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰로 연내 시설공사 시행 추진

□ 금후계획

◦ 갈치천 : 식정지구 전체분 공사 완료	: `18. 10.

◦ 풍  천 : 인월지구 편입용지 보상	: `17. 12. ~ 계속

조달청 원가심사 및 공사발주 시행	: `18. 10. ~ `22. 12.

◦ 송치천 : 3차분 공사 발주	: `18. 10.

◦ 다산천 : 실시설계 추진 및 편입용지 보상	: `18. 12.

람천 고향의 강 정비

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 행정리 (삼산교) ~ 화수리 (국악의 성지 앞)

◦ 사 업 량 : 고향의 강 조성 L=5.3km

- 보축 L=5.6km, 호안공 L=5.54㎞, 교량 1개소, 인도교 2개소

- 낙차공 6개소, 취수보 2개소, 담수보(가동보) 1개소, 취․배수공 35개소

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2018년(9개년)

◦ 총사업비 : 20,221백만원〔국비 12,133(60%), 도비 4,044(20%), 시비 4,044(20%)

- `18년사업 : 1개 지구 / 477백만원 (국비 286, 도비 96, 시비 95)

지 구 별		위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2018	2019이후
합계		4개지구	5.30	20,221	19,744	477	-	97
람천	화수지구	화수리	1.00	5,032	5,032	-	-	100	‘15년 준공
	신기지구	신기리	2.38	8,402	8,402	-	-	100	‘17년 준공
	행정지구	행정리	1.92	6,054	6,054	-	-	100	‘18년 준공
	호안정비지구	행정~화수	0.52	733	256	477	-	52	‘17 ~ ‘18

□ 추진실적

◦ 행정지구	/ 전체공정률 100%

- 호안공 L=1.02km, 인도교 2개소, 낙차공 3개소, 취수보 1개소 완료

◦ 호안정비지구	/ 전체공정률  55%

- 호안공 L=0.22km, 제방포장 2.04km 완료

※ 총사업비 변경 승인 (부산청)	: `18. 5. 8.

- 사업량 L=5.4㎞, 당초 M.P 21,122백만원 → 변경 20,221백만원 (감901)

□ 금후계획

◦ 호안정비지구(운봉읍 신기리) 공사 완료	: `18. 11.

원천천 하천정비 및 친수공간 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간조성 L=14.3㎞ (원천천 13.7㎞, 요천 0.6㎞)

- 하천환경 84.1천㎡, 자전거길 6.08㎞, 보축 2.13㎞, 교량 6개소 등

◦ 총사업비 : 20,510백만원〔국비 11,100(54%), 도비 3,764(18%), 시비 5,646(28%)〕

- 요  천 (국가하천 1.0km / 익산청)  :   1,689백만원(국비 100%)

- 원천천 (지방하천 14.6km / 우리시) : 18,821백만원(국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)

※ `18년도 사업비 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2020년(5개년)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진 (총용역비 1,245백만원)	: `16. 9. 28. ~ `18.  2. 18.

◦ 선진지 벤치마킹 (3개 시 4개 하천)	: `17. 5. 10. ~ 12. (3일간)

- 11명 (안전경제건설위원회 의원 6명, 전문위원 외 4명)

◦ 문화재지표조사 및 환경영향평가용역 착수	: `17. 10. ~ `18. 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 2 ․ 3차분 과업 중지	: `17. 12. / `18.  5.

- 요천권역 하천기본계획 수립 지연

◦ 기본 및 실시설계 (안) 확정	: `18.  5.  3.

- 익산청 하천계획과 협의 완료 (현장 방문)

◦ 원천천 설계 협의(익산청, 국토부, 전북도 / 4회)	: `18.  5. ~ 9월

□ 쟁점 및 대책

◦ 요천 (국가하천 / 익산청 사업구간) 도통동 인도교 좌안 수변 생태 레저공원지구 하천구역 지정 애로

- 익산청에서 시행 중인「요천권역 하천기본계획」치수 타당성 분석 결과,   기설제방 보축 또는 홍수관리구역 지정을 검토하고 있어 지속적인 대응 필요

□ 금후계획

◦ 총사업비승인 협의절차 이행 (익산청 / 국토부)	: `18. 10.

◦ 환경영향평가서 초안 공람 및 주민설명회 개최	: `18. 10.

◦ 설계 적정성 검토, 기술자문, 건설심의 (전북도)	: `18. 11. ~ 12월

◦ 공사발주 및 사업 추진	: `19.  2.

소하천 정비

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 : 6개지구 /  4.31㎞ / 13,417백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천)

- `18년사업 : 2개지구 / 2,066백만원〔국비 1,033 (50%), 시비 1,033 (50%)〕

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 1개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2022년(7개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2018	2019이후
	합 계	2개하천	5.70	15,146	946	2,066	12,134	20
계속	고평천	수지 고평	2.30	7,745	946	1,746	5,053	35	`16 ~ `19
신규	당동천	아영 봉대	3.40	7,401	-	320	7,081	4	`18 ~ `22

□ 추진실적

◦ 고평천 : 1 ․ 2차분 준공	: `17.  5. 10. ~ `18.  4. 23.

3차분 착공 (공정률 58%)	: `18.  2. 27. ~ `18. 12. 23.

◦ 당동천 : 실시설계 용역 착수	: `18.  2. 21. ~  8. 19.

소규모 환경영향평가 용역 착수	: `18.  6.  1. ~  9. 28.

주민설명회 개최 완료	: `18.  6. 19.

□ 금후계획

◦ 고평천 : 3차분 공사 완료	: `18. 11월

◦ 당동천 : 실시설계 협의 (전북도, 행정안전부)	: `18.  9. ~ 12월

공사 발주	: `18. 12월

편입용지 보상 추진	: `18. 12월 ~

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소(L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원(시비 100%)

◦ 용역기간 : 2015 ~ 2018년(4개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 분할 용역 발주 추진

- 섬진강 권역 :   272개소 /  292.4㎞

- 낙동강 권역 :    75개소 /   97.2㎞

- 전략환경평가 :  347개소 /  389.6㎞

(단위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	기투자	2018	2019	용역기간
합 계	347개소/ L=389.6㎞	5,837	4,700	1,137	-	`15 ~ `18
섬진강 권역	272개소/ L=292.4㎞	3,572	2,700	872	-	`15 ~ `18
낙동강 권역	75개소/ L=97.2㎞	1,315	1,050	265	-	`16 ~ `18
전략환경평가	전구간	950	950	-	-	`17 ~ `19

□ 추진실적

◦ 섬진강 권역 (1 ~ 4차분 완료)	/ 공정률  82%

◦ 낙동강 권역 (1 ~ 2차분 완료)	/ 공정률  76%

◦ 전략환경영향평가 추진	/ 공정률  50%

□ 쟁점 및 대책

◦ 소하천의 지정(신규·구간조정·폐지)에 따른 관계기관(농어촌공사, 농정과 등)과 신중한 검토 필요

- 소하천 개소 변경 (당초 347개소→변경 283개소 / 감 64개소) 지정 추진

□ 금후계획

◦ 전략환경영향평가 초안 주민공람 및 주민설명회	: `18.  9. 11. ~ 10. 24.

◦ 전략환경영향평가 초안 협의(시, 유역환경청 등)	: `18. 10.  1. ~ 10. 30.

◦ 전북도 협의(보고) 및 기초소하천관리위원회 심의	: `18. 11.  1. ~ 11. 30.

- 소하천 신규, 변경, 폐지

◦ 전략환경영향평가 본안 협의(시, 유역환경청 등)	: `18. 11. 1. ~ `19. 1. 31.

◦ 소하천대장작성 광역소하천관리위원회 심의	: `19. 2. 1. ~  5. 30.

◦ 소하천대장 전산화 및 지형도면고시	: `19. 6. 30.

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천·지방하천·국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개 사업 / L =41.0km (하천정비 15.0㎞, 하도준설 20.0㎞ 등)

◦ 사 업 비 : 2,852백만원 (국비 920, 도비 48, 시비 1,884)

◦ 사업기간 : 2018년

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업 / L=41.0㎞	41.0	2,852
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	520	추진 중
	하천 하도준설	20.0	640	″
	주민참여예산	3.7	301	″
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	471	″
국가하천 유지보수사업	국가하천 섬진강, 요천 유지관리	섬진강 21.0 요 천 17.9	920	″

□ 추진실적

【소하천 및 기성제 유지관리사업】

◦ 하천유지관리 사업 추진	: `18. 1. 26. ~ 9. 15.

- 유지관리 완료 / 이백면 백암천외 15개소, L= 1.6km  : `18. 4.  3. ~ 8. 28.

- 하도준설 완료 / 수지면 신평천외 27개소, L=13.4km  : `18. 1. 25. ~ 8. 10.

- ‘18년도 하반기 하도준설 및 수목제거 대상지 선정 : `18. 7. 26. ~ 8. 30.

【국가하천 유지보수사업】

◦ 국가하천 요천 데크공사 외 11건 공사 완료	: `18. 4. 25. ~ 8.  7.

□ 금후계획

【소하천 및 기성제 유지관리사업】

◦ 하반기 하도준설 및 수목제거 추진	: `18. 9. ~ 11월

【국가하천 유지보수사업】

◦ 신규사업 익산청, 전북도 협의 추진	: `18. 9. ~ 10월

◦ 섬진강‧요천 유지보수 공사 추진	: `18. 9. ~ 12월

요천 내 수경시설(분수) 설치

□ 개    요

◦ 위    치 : 쌍교동 요천 지내 / 국가하천

◦ 사 업 량 : 수경시설(음악분수 / 고정식) 및 조명․음향․분수 연출 1식

◦ 총사업비 : 7,155백만원(시비)  - `18년 사업비 : 4,500백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2019년(3개년)

□ 추진실적

◦ 선진지 벤치마킹(경남 양산천, 강원 양구서천)       : `17.  6. 22. ~ 23.(2일간)

◦ 익산청 분수설치 사업계획 설명	: `17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: `17. 10. 24. ~

◦ 의회 선진지 벤치마킹(전남 광양서천, 김해 연지공원)	: `18.  2. 26. ~ 28.(3일간)

◦ 용역 중간보고회 개최	: `18.  8.  3.

◦ 시의회 벤치마킹(광양 서천 무지개 분수시설)	: `18.  8. 10.

□ 쟁점 및 대책

◦ 수경시설(분수) 설치를 위한 주요자재 및 시스템이 특허로 되어 있어 개별 특허 반영 애로

- 수경시설 설치업체에 대한 특허 심의위원회 구성 반영 추진(자재, 시스템 등)

· 특허 기술의 필요성, 경제성, 유사기술과의 비교검토 분석 추진

· 특허 선정의 투명성 제고를 위해 전문가 등 심의회 구성(대학교수, 시의원, 공무원 등)

□ 금후계획

◦ 수경시설 설치업체 특허공법 심의 및 선정	: `18. 10월

◦ 익산청 분수설치 사업계획 협의 (하천점용)	: `18. 10월

◦ 조달청 공사발주 의뢰 및 추진	: `18. 11월 ~ `19. 10월