2019. 1.

2019년 주요업무 계획

도   시   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2018년 주요업무 결산

□ 2019년 중점 추진방향

□ 2019년 주요업무 계획

◦ 2040 남원 도시기본계획수립

◦ 도시관리계획(일반주거지역세분 및 최고고도지구) 변경

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 국립 공공의료대학(원) 설립 추진 지원

◦ 도시가로망 개설 및 인도정비 사업(총괄)

◦ 신정대로 개설공사(1·2구간)

◦ 교룡대로 개설공사(1·2구간)

◦ 지리산IC 진입도로 개설공사

◦ 시청로 정비공사

◦ 안전한 보행환경 조성사업(보조)

◦ 도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

◦ 남원 도시재생사업(근린재생형)

◦ 남원 도시재생 뉴딜사업

◦ 남원 일반산업단지 조성사업

◦ 남원 일반산업단지 국고지원사업

◦ 도시공원 내 사유지 매입

◦ 중앙공원 조성

◦ 금암공원 조성

◦ 어린이공원 새단장

일  반  현  황

□ 기    구

										도 시 과 장
										남 정 식
도시계획담당					도시정비담당						도시재생담당								산업용지조성담당						공원담당
차 남 희					소 명 호						안 용 운								서 지 호						김 형 준
◦도시기본, 관리 계획수립 ◦도시계획시설결정및인가 ◦지구단위계획 수 립 ◦개발행위허가 ◦전문건설업관리					◦도시가로망 사업 시행 및 정비 ◦지역개발사업 ◦안전한 보행 환경조성 ◦전선 지중화 사업 ◦시가지 인도 정비사업 ◦공공의료대학원 설립지원						◦도시재생사업 ◦노암산업단지 연결도로 공사 ◦지역수요맞춤지원공모사업 ◦온천개발 업무								◦일반산업단지 조성 ◦농공단지 지정 및 조성 ◦산업용지 보상 및 수용재결 ◦골프장 조성 지원						◦공원 녹지 기본계획(변경) 수립 ◦공원 조성 사업 추진 ◦공원용지보상 ◦공원 및 녹지점용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	5	8	6	2
현 원	22	1	6	6	5	4	공무직 1
증 감	-	-	1	△2	△1	2

□ 도시관리계획

(2018. 12월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.42 (36.7)	337.75 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2018. 12월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.063 (0.21)	6.351 (20.72)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.06)	1.835 (5.99)	20.415 (66.61)	0.983 (3.21)
남 원	26.646 (100%)	0.063 (0.24)	5.355 (20.10)	0.016 (0.06)	0.784 (2.94)	0.020 (0.07)	1.835 (6.89)	18.573 (69.70)
운 봉	1.660 (100%)		0.505 (30.42)		0.093 (5.60)			0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.341 (100%)		0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)			1.142 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역 내 도시계획 도로

(2018. 12월 기준)                                               (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	791	9,299	553	8,522	238	777	91.6
대 로	35	2,367	23	2,090	12	277	88.3
중 로	138	3,746	106	3,466	32	280	92.5
소 로	618	3,186	424	2,966	194	220	68.6

□ 건설업체 현황

(2018. 12월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
262	427	262	427	206	358	56	69	32	35

2018년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 중앙부처 공모사업 선정 및 국가예산 확보 ◦ 도시가로망 정비 및 확충으로 교통안전 및 생활편의 도모 ◦ 도통동 어린이 공원을 물방개 워터파크로 조성하여 시민들로부터 호평

□ 중앙부처 공모사업 선정

Ⅰ 안전한 보행환경 조성사업(행안부 안전개선과)

◦ 위    치 : 선원사4가~시외버스터미널~쌍교동성당 일원

◦ 사업내용 : 인도개설 : L=1.4㎞, 상·하수도 정비, 전선지중화

◦ 사 업 비 : 12억원 (국비 6, 시비 6)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3개년)

Ⅱ 2019년 도시재생 뉴딜사업(국토부 도심재생과)

◦ 위    치 : 동충·죽항동 일원(시외버스터미널 주변)

◦ 사업내용 : 춘몽․향단로 정비, 예루원(소공원)조성, 놀다街(문화골목투어), 도시재생대학, 주민 공모사업, 사랑나눔(마을카페․공방) 등

◦ 총사업비 : 142억원(국비 85, 도비 14, 시비 43)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4개년)

□ 2019년 국가예산 확보 : 8개 사업 / 138.7억원(국 132, 도 6.7)

◦ 지리산 I.C 진입도로 개설사업	/   10억원

◦ 안전한 보행환경 조성사업	/    6억원

◦ 도시재생사업	/ 44.5억원(국 37.8, 도 6.7)

◦ 북남원 I.C 남원 원도심 연결도로	/   21억원

◦ 도시활력 증진지역 개발사업	/  5.7억원

◦ 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치	/   20억원

◦ 일반산업단지 공업용수도 건설사업	/   29억원

◦ 중앙공원 조성사업	/   2.5억원

□ 태양광발전사업 시행을 위한 개발행위허가 처리

◦ 정부의 탈원전 정책에 따른 태양광발전사업 개발행위허가 신청건수 급증

- 개발행위허가 신청현황 ┌ 최근 5년간 : 연 평균 464건

└ ‘18년도 : 2,048건 (440%)증가

- 민원상담, 당사자간 이해갈등 조정, 현장조사 및 관련서류 검토 등 정상적인 업무추진 애로

◦ 직원간 소통강화와 업무연찬을 통해 대민업무 신뢰도를 향상 시켜 업무추진의 완성도를 높이고 있음.

□ 도시 기반시설 확충 지역 접근성 개선과 주민편의 도모 / 28지구 342억

◦ 준공 : 11지구 / 43억원(중로1, 소로8, 인도정비2)

- 중로(충열사), 인도정비(롯데마트~의료원, 향교5가~구역사간)

소로(동충5통, 서천1길, 인월서무, 봉당길, 서문길, 광석마을, 장승마을, 네마실1길)

◦ 공사중 : 11지구 / 277억원 (대로3, 중로4, 소로 2, 인도정비 2)

- 대로(교룡, 신정, 지리산IC)

중로(용성중로, 용정중로, 새터중로, 노암산업단지연결)

소로(고산길, 원광한의원), 인도정비(운봉시가지, 향단로·용성로)

◦ 설계 및 용지보상 중 : 6지구 / 22억원(중로2, 소로 4)

- 중로(금암길, 만인로), 소로(금동8통, 노암2통, 서영환, 호치길)

□ 주민 주도 도시재생사업 추진

◦ 춘몽·향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 추진(‘18. 2. ~ 12.)

◦ 도시재생대학 운영(4기, 5기)을 통한 주민 역량강화 활동(수료자 : 95명)

◦ 주민 협동조합 사회적 경제 활동 추진(예루원 트래블라운지)

⇒ 예루원 떡카페팀, 낭만춘향 한브랜드

◦ 도시재생 주민 공모사업 추진(5개팀 : 상반기 1, 하반기 4)

□ 남원 사매 일반산업단지 조성사업 추진 / 4개 사업 215억

◦ 단지조성공사는 지장물 철거 등 선행공종 미이행으로 부지조성에 애로가 있으나, 명도소송 신청 등 강제 집행 절차 마무리

- ‘19. 2월부터 철거작업 집행예정

◦ 진입도로 및 공업용수도 건설사업은 정상 추진 중

◦ 공공폐수 처리 설치사업은 처리방식에 대한 타당성 분석을 완료하고 환경부와 최종협의 중으로 1월 중 마무리 목표로 추진 중임

□ 체계적인 도시공원 조성 및 관리

◦「도시공원 일몰제」대상이 되는 공원에 대하여 우선관리지역을 선정하여 체계적으로 사유지 매입 추진 / 691천㎡ 160억원 중 125천㎡ 30억원

◦ 물방개 워터파크 조성 및 운영을 통해 물놀이 명소로 자리잡음.

◦ 쾌적한 도시공원 유지․관리 : 16개소(근린 4, 어린이 12)

- 예초, 생육개선 등 조경지 관리 및 놀이터 등 시설물 유지관리 추진

	아쉬운 점
◦ 2018년도 한해를 되돌아보면 도통동 어린이 공원을 물방개 워터파크로 조성하여 많은 시민들로부터 좋은 호평을 받는 등 많은 성과를 이루 었음에도 불구하고 ◦ 예산확보 후 사업추진 지연으로 인한 사고 ․ 명시이월액의 과다발생, 사직단 부근 도로개설로 인한 민원발생 ◦ 산업단지조성사업 폐수처리방식 변경 검토에 따른 행정력 과다소요 등 많은 아쉬움이 있었음 ◦ 2019년에는 올해의 일들을 거울삼아 더욱 분발하고 체계적인 업무 처리로 시민의 삶의 질 향상과 더 편리한 도시환경구축에 최선을 다 하겠음

2019년 중점 추진방향

삶의 질 향상과

더 편리한 도시환경 구축

	중 점 추 진 과 제
◦ 체계적인 도시계획 - 편리하고 체계적인 도시 공간구조 기틀 마련 ◦ 시민생활 중심의 도시가로망 확충 - 사업 조기발주 추진과 체계적 품질관리로 시민의 삶에 도움이 되는 기반 조성 ◦ 도시 활성화를 위한 도시재생사업 - 시민의 삶의 질 향상을 위한 도시재생사업 추진 ◦ 일반 산단 조성을 통한 지역발전 기반 구축 - 단지조성 정상 추진으로 기반시설 구축 - 국고지원사업 국비 예산 확보 주력 ◦ 건전하고 체계적인 도시공원 조성 - 장기미집행 도시계획시설(공원) 사유지 매입 추진 - 중앙·금암공원 조성 추진 및 어린이공원 조성과 도시공원 유지관리

2019년 주요업무 계획

도시관리계획(일반주거지역세분 및

최고고도지구) 변경

□ 개    요

◦ 일반주거지역 세분

- 제2종일반주거지역 세분화 시행 (제1종 : 제2종 비율 2 : 8)

◦ 최고고도지구 재검토

- 문화재보호구역 주변지역 고도지구 해제

◦ 자연취락지구 지정

- 자연마을대상 검토 지정(30~40호 이상 마을 우선지정 200개소)

◦ 성장관리방안 수립 및 장기미집행시설(근린공원 관리방안) 검토

◦ 사 업 비 : 510백만원

◦ 사업기간 : ‘17. 12. ~ ‘19. 3.

□ 추진실적

◦ 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수	: ‘17. 12. 29.

◦ 도시관리계획 결정(변경) 안 보고(시장)	: ‘18. 7. 3.

◦ 전북도 사전협의	: ‘18. 8. ~ 12.

◦ 시의회 보고	: ‘18. 12. 4.

◦ 도시관리계획 결정(변경) 입안	: ‘18. 12. 28.

□ 금후계획

◦ 주민공람 및 관련부서 협의	: ‘19. 1.

◦ 시의회 의견청취 및 시 도시계획위원회 자문․심의	: ‘19. 2.

◦ 전북도 승인요청 및 도 도시계획위원회 심의	: ‘19. 2. ~ 3.

◦ 도시관리계획 변경 사항 고시 및 지형도면 고시	: ‘19. 3.

2040 남원 도시기본계획수립

□ 개    요

◦ 사업범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

◦ 사업내용 : 도시기본계획, 도시교통계획, 저탄소녹색도시계획,

국토계획평가 등

◦ 사 업 비 : 총 1,500백만원 (2019년 : 500백만원)

□ 추진계획

◦ 용역발주(PQ) 및 착수	: ‘19. 1. ~ 3.

◦ 기초조사 및 기본계획“안” 마련	: ‘19. 4. ~ 12.

◦ 사전 주민의견 수렴 및 시의회 의견청취	: ‘20. 1. ~ 4.

◦ 도시기본계획 입안	: ‘20. 5. ~ 6.

◦ 주민공청회 개최 및 시의회 의견청취	: ‘20. 7. ~ 9.

◦ 시 도시계획위원회 자문	: ‘20. 10.

◦ 도시기본계획 승인 요청(전북도)	: ‘20. 11.

◦ 도 도시계획위원회 심의	: ‘21. 1. ~ 2.

◦ 도시기본계획 승인	: ‘21. 3.

□ 기대효과

◦ 원도심 재생사업과 남원 일반산업단지 조성, 구암지구 도시개발사업공공의료대학 입지 등 각종 사업으로 인한 도시 공간구조의 변화를 제시함으로써 예측 가능한 도시 미래상 제시

◦ 변화되는 시의 지표(인구․산업구조 등)를 반영하고 장래 도시발전 방향 등에 대한 검토를 통해 도시관리계획의 정비방향 및 지속가능한 발전 방향을 제시

구암지구 도시개발사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시 행 자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 331억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	172,604㎡	64,170㎡ (3필지)	16,498㎡ (44필지)	9,788㎡ (12필지)	18,632㎡ (2필지)	도로,공원, 녹지,저류지 등
수용인구·세대수		3,032인 / 1,166호(2.6인/호)

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: ‘17. 9. 1.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: ‘18. 4. 20.

◦ 주민의견 청취(14일간)	: ‘18. 5. 1.

◦ 시 의회보고	: ‘18. 6. 20.

◦ 시 도시계획위원회 자문	: ‘18. 8. 30.

◦ 구역지정 승인 관련 전라북도 협의	: ‘18. 9. ~ 11.

- 최고고도지구 및 주거지역 종 세분 계획과 병행 추진요구

□ 금후계획

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(전라북도)	: ‘19. 2.

◦ 실시계획 인가 신청 및 승인(LH↔남원시)	: ‘19. 3. ~ 9.

◦ 환지계획 인가 신청 및 환지예정지 지정(LH↔남원시)  : ‘19. 9. ~ ‘20. 3.

◦ 법원부지 매각관련 선수협약 체결(LH↔법원)	: ‘19. 10.

- 부지매각대금 지급 관련 계약(체비지 공급계약)	: ‘20. 4.

◦ 공사추진(LH)	: ‘20. 6. ~ ‘22. 6.

◦ 택지공급(LH)	: ‘21. 상반기

◦ 공동주택 분양(입주예정:2023년 하반기)	: ‘21. 하반기

국립 공공의료대학(원) 설립 추진 지원

[남원 도시계획시설[공공의료대학(원)] 결정용역)]

□ 개    요

◦ 용 역 명 : 남원 도시계획시설[공공의료대학(원)] 결정용역

◦ 위    치 : 남원시 고죽동 일원

◦ 과 업 량 : 도시계획시설결정 A=64,600㎡(발주 78,000㎡-정산예정)

◦ 용 역 비 : 금401,628천원

◦ 용역기간 : 2018. 12. 20. ~ 2019. 10. 15. (10개월)

□ 추진실적

◦ 국립공공의료대학(원)설립 발표	: ‘18. 4. 11.

◦ 남원시 공공의료대학 TF팀구성 운영	: ‘18. 7. 10.

◦ 공공보건의료발전종합대책발표(박능후장관)	: ‘18. 10. 1.

- 공공의료대학 2022년 3월까지 설립

◦ 도시계획시설 결정용역 발주계회 보고	: ‘18. 10. 22.

◦ 용역(사업수행능력평가) 원가심사 완료 및 시행	: ‘18. 10. 30.

◦ 사업수행능력평가서 제출 및 평가	: ‘18. 11. 26.

◦ 사업수행능력평가 결과 통보	: ‘18. 12. 11.

◦ 부지 확정통보(복지부)	: ‘18. 12. 14.

□ 금후계획

◦ 용역 계약 및 착수	: ‘18. 12. 20.

◦ 용역 추진	: ‘18. 12. ~ ‘19. 10.

- 도시계획시설(학교) 입안서류 작성 및 기관, 부서 사전협의	: ‘18. 12. ~ ‘19. 10.

- 부지내 개발행위허가 제한구역 결정(공고기간 14일)	: ‘19. 1.

- 도시관리계획 입안 및 주민의견 청취	: ‘19. 3.

- 관련부서 및 유관기관 협의	: ‘19. 3. ~ 5.

- 의회 의견청취	: ‘19. 4.

- 남원 도시계획위원회 자문 개최	: ‘19. 5.

- 전라북도 신청 및 도시계획위원회 개최	: ‘19. 6.

- 남원 도시관리계획 결정(변경) 고시 및 지형도면 고시	: ‘19. 7.

- 실시설계 관련 절차 이행 및 토지수용절차(중토위 협의) 등	: ‘19. 7. ~

◦ 토지 및 지장물 보상(기획실 추진)	: ‘19. 8. ~ ‘19. 12.

도시가로망 개설 및 인도 정비 사업(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로개설 20지구, L=17.4㎞

◦ 총사업비 : 97,282백만원 (2019 : 14,166백만원)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2021년 (7개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2019	2020이후	비고
계	20지구 (L=17.4km)	97,282	49,177	14,166	33,939
대 로	4지구 (L=5.54km)	50,500	27,585	6,566	16,349
중 로	6지구 (L=4.40km)	30,600	14,300	2,400	13,900
소 로	7지구 (L=4.70km)	10,950	3,560	4,750	2,640
인도정비	3지구 (L=2.78km)	5,232	3,732	450	1,050

□ 추진실적

◦ 공사중(12지구) : 신정대로, 교룡대로, 지리산IC진입도로, 용성중로, 용정중로(2지구), 노암산업단지 연결도로, 새터 중로, 고산길(2지구), 호치길, 중소도로 유지관리, 운봉시가지 지중화, 향단로 및 용성로

◦ 설계중 (7지구) : 시청로 정비, 금암길, 만인로, 노암2통 소로, 서영환내과 옆 소로, 남원경찰서 옆 소로, 안전한 보행환경

◦ 보상중 (2지구) : 금동8통 소로, 호치길

□ 금후계획

◦ 완공대상 (10지구 L=7.58㎞) : 용성중로, 용정중로(2지구) 노암산업단지 연결도로, 고산길(2지구), 호치길(2공구), 금동8통, 남원경찰서 옆 소로, 중소도로 유지관리, 운봉시가지, 향단로·용성로

◦ 계속  시행  (5지구 L=5.20㎞) : 신정대로, 교룡대로, 지리산IC진입도로, 새터중로, 호치길

◦ 보상  및  설계 (6지구 L=4.64㎞) : 시청로정비, 금암길, 만인로, 노암2통, 서영환내과 옆 소로, 안전한 보행환경조성안전한 보행환경조성

2019년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

○ 총       괄 : 20개지구 / L=17.4㎞ / 총사업비 973억원(‘19년 141억원)

(단위:백만원)

구분	사업명	위치	사업량	총사업비	‘17년 까지	‘18년	‘19년	‘20년이후 (국비)	‘19년 추진계획	비고 (사업기간)
계			20개지구 L=17,423m	97,282	19,714	29,463	14,166	33,389 (550)
대로	소계		4개지구 L=5,540m	50,500	13,000	14,585	6,566	16,349
	신정대로	신정 금동	L=1,500m B=25~35m	18,000	1,600	7,300	1,000	8,100	공사중	‘15~’21
	교룡대로	향교왕정	L=1,300m B=25~35m	18,000	11,000	3,250	2,101	1,649	공사중	‘14~’20
	지리산IC진입도로	아영 인월	L=2,000m B=25m	12,000	400	4,000	1,000	6,600	공사중	‘17~’21
	시청로정비	도통	L=740m	2,500		35	2,465		실시설계 공사시행	‘18~’20
중로	소계		6개지구 L=4,400m	30,600	5,514	8,786	2,400	13,900
	용성중로	도통 월락	L=1,150m B=20m	6,200	3,500	2,500	200		공사완료	‘16~’19
	용정마을앞중로 (2지구)	향교	L=300m B=20m	1,900	400	800	700		공사완료	‘17~’19
	노암산업단지 연결도로	노암	L=700m B=15m	2,700	1,414	1,286			공사완료	‘17~’19
	새터중로	조산 신정	L=400m B=20m	5,500	200	3,700	500	1,100	공 사 중	‘17~’21
	금암길중로	노암	L=750m B=15m	9,000		300	500	8,200	실시설계 토지보상	‘18~’21
	만인로중로	용정	L=1,100m B=20m	5,300		200	500	4,600	실시설계 토지보상	‘18~’21
소로	소계		7개지구 L=4,703m	10,950	1,200	2,360	4,750	2,640
	고산길도로정비 (2지구)	고죽	L=1,600m B=8m	2,050	1,200	700	150		공사완료	‘17~’19
	호치길도로정비 (2공구)	왕정	L=1,700m B=8m	3,500		1,100	1,000	1,400	공사완료	‘18~’20
	금동8통소로	조산	L=165m B=6m	1,500		500	1,000		토지보상 공사시행	‘18~’19
	노암2통	노암	L=360m B=6m	1,500		30	1,000	470	토지보상	‘18~’20
	서영환내과	동충	L=288m B=4~6m	1,800		30	1,000	770	토지보상	‘18~’20
	남원경찰서	향교	L=90m B=4~6m	300			300		토지보상 공사시행	‘19
	중소도로 유지관리사업	관내	L=500m	300			300		공사시행	‘19
인도정비	소계		3개지구 L=2,780m	5,232		3,732	450	1,050
	운봉시가지	운봉	L=730m B=2.0m	2,102		2,102			공사시행	‘18~’19
	향단로,용성로	동충	L=650m B=1.5m	1,930		1,630	300		공사시행	‘18~’19
	안전한보행 환경조성(보조)	쌍교, 도통	L=1,400m	1,200			150	500 (550)	실시설계	‘19~’21

※‘18년 이월액 : 17,572백만원 (명시:10,840백만원, 사고:6,732백만원)

신정대로 개설공사(1구간)

남원역

금동아파트

⇦ 순창

17

만복사지

(중로1-2)

L=0.15km, B=20m

(소로2-138)

L=0.15km, B=8m

1구간

L=900m, B=25m

(대로1-7)

L=1.5km, B=25~35m

광치천

2구간

L=600m, B=25m

교량1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신정동(신정교차로~딩동댕 어린이집) 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.9km, B=25.0m

◦ 총사업비 : 7,500백만원(공사비 4,500, 보상비 3,000) / 19년 예산 : 700백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

□ 추진실적

◦ 국가지정 문화재(만복사지) 현상변경 허가 재심의(가결)	: ‘16. 5. 11.

◦ 도시관리계획 변경 추진(선형 변경 및 폭원 축소 등)	: ‘16. 6. ~ ‘17. 5.

◦ 실시설계 용역	: ‘17. 10. ~ ‘18. 4.

◦ 공사 착공	: ‘18. 6. 27.

◦ 실시계획인가 고시	: ‘18. 11. 9.

□ 금후계획

◦ 소규모 환경영향평가 협의완료	: ‘19. 1. 10

◦ 1차분 공사 추진 (전체분의 58%)	: ‘19. 1. ~ ‘19. 9.

◦ 2차분 공사 착수 (700백만원)	: ‘19. 7.

◦ 확장구간 아스콘 기층 포장 후 교통전환	: ‘19. 10.

◦ 공사 완료	: ‘20. 12.

신정대로 개설공사(2구간)

남원역

금동아파트

⇦ 순창

17

만복사지

(중로1-2)

L=0.15km, B=20m

(소로2-138)

L=0.15km, B=8m

1구간

L=900m, B=25m

(대로1-7)

L=1.5km, B=25~35m

광치천

2구간

L=600m, B=25m

교량1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신정동(딩동댕 어린이집)~금동(금동APT) 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.6km, B=25.0m, 교량 1개소(L=54m, B=25m)

◦ 총사업비 : 10,500백만원(공사비 10,500) / 19년 예산 : 300백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 국가지정 문화재(만복사지) 현상변경 허가 재심의(가결)	: ‘16. 5. 11.

◦ 도시관리계획 변경 추진(선형 변경 및 폭원 축소 등)	: ‘16. 6. ~ ‘17. 5.

◦ 실시설계 용역 완료	: ‘18. 6. ~ ‘18. 12.

◦ 실시계획 인가 추진	: ‘18. 12.

□ 금후계획

◦ 소규모 환경영향평가 협의완료	: ‘19. 1. 10.

◦ 계약심사(도급액 50억이상 사업 해당)	: ‘19. 1

◦ 공사 발주(조달발주 의뢰)	: ‘19. 1.

◦ 신정교 가설 및 토공완료	: ‘19. 2. ~ 12.

◦ 1차분 완료 (명시 5,800백만원 포함 전체분의 50%)	: ‘19. 12.

◦ 공사 완공	: ‘21. 12.

교룡대로 개설공사(1구간)

⇦ 북남원I.C

시 청

지적공사

신협

구 남원역

도로개설(1구간)

L=0.8km, B=35m

도로개설(2구간)

L=0.5km, B=25~35m

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(한국국토정보공사~신협) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.8km, B=35m

◦ 총사업비 : 5,000백만원(국비 4,000 시비 1,000) / 19년 예산 : 2,101백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

□ 추진실적

◦ 실시설계 추진	: ‘18. 2. ~ 8.

◦ 공사착공	: ‘18. 6. 27.

◦ 실시계획인가 고시	: ‘18. 11. 2.

◦ 매장문화재 시굴조사	: ‘18. 10. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 매장문화재 발굴(정밀)조사 실시	: ‘19. 1.

◦ 영락교회 ~ 신협 ~ 향교오거리 도로 확장공사 추진	: ‘19. 1. ~ 11.

- 신협 ~ 영락교회 앞	: ‘19. 1. ~ ‘19. 6.

- 신협 ~ 향교오거리	: ‘19. 7. ~ ‘19. 11.

◦ 국토정보공사 ~ 영락교회 구간 : 문화재 발굴조사 이후	: ‘20. 1. ~

◦ 토지보상 미협의 2개 필지 380백만원- 미협의 시 수용절차이행	: ‘19. 2. ~ 6.

교룡대로 개설공사(2구간)

⇦ 북남원I.C

시 청

지적공사

신협

구 남원역

도로개설(1구간)

L=0.8km, B=35m

도로개설(2구간)

L=0.5km, B=25~35m

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(신협~시청삼거리) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=0.5km, B=25~35m

※ 도시계획시설 : 대로 1-10호선(1963.8.26)/ 대로3-5호선(1976.12.7)

◦ 총사업비 : 13,000백만원[공사비 3,000, 보상비 10,000(1․2구간 포함)]

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

□ 추진실적

◦ 실시설계완료	: ‘17. 8. ~ 12.

◦ 원가심사 완료	: ‘17. 12.

◦ 공사착공	: ‘17. 12. 21.

◦ 실시계획인가 고시	: ‘18. 3. 16.

◦ 1차분 공사완료(전체분의 85%)	: ‘18. 12.

□ 금후계획

◦ 가로수 식재 및 교통안전시설 설치	: ‘19. 2.

◦ 가로등 및 신호등 설치완료	: ‘19. 4.

◦ 공사 완공	: ‘19. 6.

지리산IC 진입도로 개설공사(도시계획구간)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면(인월삼거리~현대주유소) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=0.9km, B=20m

◦ 사 업 비 : 6,500백만원(공사비 5,000, 보상비 1,500) / 19년 예산 : 500백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

□ 추진실적

◦ 중기 지방계획 반영 및 투자심사 완료	: ‘17. 9. ~ 11.

◦ 실시설계 용역(도시계획구간)	: ‘17. 11. ~ ‘18. 6.

◦ 공사 착공 (추진공정 10%)	: ‘18. 6. 25.

◦ 소규모환경영향평가 완료	: ‘18. 6. 25.

◦ 실시계획인가 고시	: ‘18. 10. 5.

□ 금후계획

◦ 확장구간 성토 및 보강토 옹벽 시공	: ‘19. 3. ~ ‘19. 4.

◦ 확장구간 아스콘 포장 후 교통전환	: ‘19. 4. ~ ‘19. 6.

◦ 1차분 공사 준공 (전체분의 78%)	: ‘19. 12.

◦ 도시계획구간 준공	: ‘20. 6.

지리산IC 진입도로 개설공사(비도시계획구간)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면(인월삼거리~현대주유소) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=1.1km, B=20m

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 5,500백만원(공사비 4,500, 보상비 1,000) / 19년 예산 : 500백만원

□ 추진실적

◦ 중기 지방계획 반영 및 투자심사 완료	: ‘17. 9. ~ 11.

◦ 비도시지역 도로개설 건의 3회(시 ￫ 도로공사)	: ‘18. 4월, 5월, 7월

◦ 사업시행 어려움 회신(도로공사 ￫ 시)	: ‘18. 8. 30.

◦ 사업시행 재건의(토지보상비 남원시 부담조건) (시￫도로공사)	: ‘18. 9. 4.

◦ 사업비(10억원) 지원결정 (도로공사 ￫ 남원시)	: ‘18. 11. 29.

□ 금후계획

◦ 비도시계획 구간 설계 추진	: ‘19. 1. ~ ‘19. 6.

◦ 지장물 조사 및 토지감정평가	: ‘19. 6. ~ ‘19. 8.

◦ 용지보상	: ‘19. 8. ~ ‘19. 11.

◦ 비도시계획 구간 공사 착공	: ‘19. 11. ~

시청로 정비공사

구.남원역

남원시청

남원대교

시청로

L=750m

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 시청로 일원

◦ 사 업 량 : 도로환경개선 및 지중화사업 등 L=740m

◦ 사 업 비 : 2,500백만원 / 19년예산 : 2,465백만원(공사비 1,465, 대행사업비 1,000)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

□ 추진실적

◦ 기본계획수립 용역 착수	: ‘18. 9. 7.

◦ 중기 지방계획 및 지방투자심사 반영	: ‘18. 11. 12.

◦ 주민의견수렴	(86세대 직접방문 및 설문조사 실시)	: ‘18. 12. 5. ~ 12. 12.

◦ 기본설계 완료	: ‘18. 12.

□ 금후계획

◦ 실시설계 추진	: ‘19. 1. ~ ‘19. 6.

◦ 한전 및 통신사 지중화공사 사업비 확보 협의	: ‘19. 1. ~ ‘19. 6.

◦ 전선 지중화공사 추진	: ‘19. 7. ~ ‘19. 10.

◦ 공사시행	: ‘19. 11. ~ ‘20. 10.

안전한 보행환경 조성사업(보조)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 쌍교동, 죽항동, 도통동 일원

◦ 사업내용 : 전선지중화 및 인도개설 L=1.4㎞

◦ 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600, 시비 600) / 19년예산 : 50백만원(국비)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3개년)

※ 공모사업 선정 : 2018. 10. 25. / 행정안전부 안전개선과

□ 추진계획

◦ 용역과제 심의	: ‘18. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘19. 1. ~ 8.

◦ 전선지중화 사업 신청(남원시￫한전)	: ‘19. 6.

- 사업구간 내 배전선로 및 통신선로 지중화

◦ 공사 시행	: ‘20. 3. ~ ‘21. 12.

□ 기대효과

◦ 보도가 단절된 구간에 인도를 개설하여 교통사고 위험성을 최소화

◦ 전선 지중화로 쾌적한 도시환경 조성

도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(남원향교 일원)

◦ 사업내용 : 마을입구 회전교차로, 유휴부지 활용사업(주차장 3, 소공원 1), 안전한 통학로 정비사업, 주민역량강화(전통문화 프로그램 운영)

◦ 총사업비 : 3,584백만원(균특 50%, 시비 50%)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	비 고
계	3,584	400	672	1,132	1,380
균 특	1,792	200	336	566	690
시 비	1,792	200	336	566	690

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 완료                          : ‘18. 2.

◦ 원가심사 완료(도)                                 : ‘18. 3. 21.

◦ 편입토지 용지보상 협의 추진(20필지 중 7필지 보상 완료)  : ‘18. 4. ~

◦ 1차분 공사 준공                                   : ‘18. 11. 4.

- 소규모주차장(1개소) 설치, 향교 ~ 만인의총 간 인도 정비

◦ 회전교차로 편입 건축물(한진택배) 보상 및 철거 완료 : ‘18. 11. 30.

□ 금후계획

◦ 편입토지 분할측량                                : ‘18. 12.

◦ 편입토지 감정평가 및 보상                       : ‘19. 1. ~ 2.

◦ 2차분 공사 추진                                 : ‘19. 3. ~ 12.

- 회전교차로, 소규모주차장(2개소), 소공원 및 산책로 등

남원 도시재생사업(근린재생형)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항․금동 일원(원도심 지역 : A=1.12㎢)

◦ 사업내용 : 춘몽․향단로 정비, 예루원(소공원) 조성, 놀다街(문화골목투어), 도시재생대학, 주민 공모사업, 사랑나눔(마을카페․공방) 등

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020년(6개년)

◦ 사 업 비 : 10,200백만원(균특 5,000, 도비 1,000, 시비 4,200)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020	비 고
계	10,200	1,106	2,694	2,450	3,950
균 특	5,000	553	1,347	1,225	1,875
도 비	1,000	111	269	245	375
시 비	4,200	442	1,078	980	1,700

□ 추진실적

◦ 도시재생대학 운영(수료자 : 4기 47명, 5기 48명)    : ‘18. 1. ~ 10.

◦ 2018년 도시재생 모니터링 용역 추진              : ‘18. 1. ~ 12.

◦ 춘몽․향단로 정비공사 기본 및 실시설계용역 추진   : ‘18. 2. ~ 12.

◦ 주민 공모사업 추진(5팀)                          : ‘18. 4. ~ 12.

□ 금후계획

◦ 청실홍실(혼례대행), 춘향이 시집가는날(주민참여 신행재현 축제) 등

도시재생 지원센터와 주민협의체, 예술인이 참여하여 행사 준비 및 추진

: ‘19. 1. ~ 5.

◦ 도시재생대학, 주민공모사업, 놀다街 등 마중물사업 추진 : ‘19. 1. ~ 12.

◦ 춘몽․향단로 정비공사(1차분) 추진                  : ‘19. 3. ~ 12.

- 지중화 및 하수관거 정비 병행 추진

※ 지중화완료 : 춘몽로(용성초4가~제일은행4가), 지중화추진 : 향단로(구역사~법원4가)

남원 도시재생사업(근린재생형) 총괄사업계획표

목표	단 위 사 업		사업비 (억원)	사업량	연도별
					계	이전	19년	이후
합 계			102.0	16개 사업	102.0	37.6	24.5	39.9
전략계획 및 활성화계획 수립			2.0		2.0	2.0	0	0
살만한 동네	소 계 (6개 사업)		58.0		58.0	31.5	10.8	15.7
	꽃피는 마을 예! 루원	춘몽로 정비 (테마가로)	31.0	제일은행 4가 ~ 구역사부지 가로 보행환경 및 경관 정비(L=800m)	38.0	31.3	6.7	0
		향단로 정비 (마을꽃길)	7.0	구역사부지 ~ 십수정 가로수 정비 및 화단 조성(L=1㎞)
		예! 루원 (6개의 누각·정원)	13.0	춘몽로, 향단로 일원 소공원 2개소, 쉼터 2개소	13.0	0	1.4	11.6
	공·폐가 재탄생	사랑나눔 (마을카페·공방)	5.0	빈집,빈점포 리모델링 카페·공방 5개소 내외, 카페공방사무소 조성 1개소	5.0	0.2	2.5	2.3
		커뮤니티가든 (마을텃밭)	0.5	마을 공동 텃밭 조성 (빈터·폐가 5개소)	0.5	0	0.2	0.3
	숨은공간찾기 (유휴공간 조사·활용)		1.5	빈공간 정보 구축·콘텐츠 발굴, 업데이트	1.5	0	0	1.5
예술인과 함께가는 재생길	소 계(3개 사업)		14.3		14.3	0	0.9	13.4
	청실홍실, 작은 결혼식	청실홍실(혼례대행)	5.5	혼례대행 운영(공모 형태 발주) - 장소 : 광한루원, 예촌 주변 - 운영주체 : 협동조합, 민간단체	5.5	0	0.3	5.2
		춘향이 시집가는 날 (주민참여 신행재현 축제)	1.8	신행 재현 - 장소 : 광한루원 ~ 구역사 거리 - 운영주체 : 협동조합, 민간단체 ※ 신행 : 신방치루고 신랑집가는 행렬	1.8	0	0.6	1.2
	북문예술인촌(창작·전시공간)		7.0	구역사건물 리모델링, 야외전시·창작공간 조성(8~10개소)	7.0	0	0	7.0
돌아온 관광객, 회복되는 근린상권	소 계(3개 사업)		14.2		14.2	0	8.9	5.3
	놀다街(문화골목투어)		10.0	구역사 ~ 하늘중 ~ 고샘골목 ~ 공설시장 골목투어 루트개발	10.0	0	8.4	1.6
	게스트하우스休 (도심민박업지원)		1.2	게스트하우스 희망자 창업교육 및 컨설팅(연 2회)	1.2	0	0	1.2
	남원성마을(마을길정비)		3.0	남원성 북벽 아랫마을 마을길 정비 L=630m, B=3m	3.0	0	0.5	2.5
뒷심 좋은 공동체	소 계(4개 사업)		13.5		13.5	4.1	3.9	5.6
	소공동체활성화사업		2.0	주민 공모사업 (건당 5백만원 범위 내 시행)	2.0	0.6	0.3	1.0
	도시재생모니터링		2.0	사업 효과 모니터링 용역 - 교육 수, 빈집 수, 유동인구 수 빈점포 수 등	2.0	0.8	0.5	0.7
	교! 용성(주민학교)		5.0	도시재생대학(1기당 60여명) - 3기부터 센터 직영 운영(50백만원)	5.0	1.9	1.0	2.1
	꿈꾸는마을문화공간		4.5	주민 공동 교육장 조성(구군청 지하), 옥상 정원 조성	4.5	0.7	2.0	1.8

남원 도시재생 뉴딜사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 거점플랫폼 조성, 용성로 정비, 숲정이 저잣거리 조성,

골목길 개선사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4개년)

◦ 사 업 비 : 14,167백만원(균특 8,500, 도비 1,417, 시비 4,250)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020이후	비 고
계	14,167		4,250	9,917
균 특	8,500		2,550	5,950
도 비	1,417		425	992
시 비	4,250		1,275	2,975

□ 추진실적

◦ 도시재생(뉴딜) 활성화계획 수립 용역 착수        : ‘18. 3. 26.

◦ 공모사업 신청 및 선정                           : ‘18. 7. ~ 8. 31.

◦ 선도지역 지정 주민공청회 및 의회 의견수렴        : ‘18.10.30./11.22.

◦ 선도지역 지정 신청                              : ‘18. 11. 23.

□ 금후계획

◦ 활성화계획 수립을 위한 의견 수렴                : ‘19. 1. ~ 2.

- 주민⋅시의회⋅도시재생위원회(도시계획위원회)

◦ 활성화계획(안) 승인 신청(국토부)                  : ‘19. 2.

◦ 도시재생특별위원회 심의 및 활성화계획 승인(예정) : ‘19. 3.

◦ 마중물사업(용성로 정비 등) 실시설계 용역 추진    : ‘19. 3. ~ 9.

◦ 도시재생대학 등 주민역량강화 사업 추진          : ‘19. 4. ~ 11.

◦ 마중물 사업(용성로 정비 등) 공사	: ‘19. 10. ~

남원 도시재생 뉴딜사업 총괄사업계획표

목표	단 위 사 업			사업비 (억원)	사업량	연도별
						계	이전	19년	이후
합 계				141.67	20개 사업	141.67		42.5	101.37
활성화계획 수립								0.7
센터 운영비								1.5
숲정이 ‘삶’ 이야기	소 계 (7개 사업)			60.36		60.36		30.4	29.96
	쾌적한 정주기반 조성	골목길 개선사업		7.36	주거지 골목길 정비를 통한 정주여건 개선	7.36		0.3	7.06
		노후주택 (그린)리모델링		4.00	노후화된 주택 그린 리모델링 및 관련 교육	4.0		1.0	3.0
		공용 인프라시설 확충		34.00	주거 밀집 지역에 공용 택배보관함 및 주차장 설치, 유휴공간을 활용하여 마을 공용 텃밭 조성	34.0		28.0	6.0
	동네 커뮤니티 문화 활성화	뚝딱 관리소	남원숲다방	12.70	주거 돌봄 서비스 제공 게스트하우스, 카페, 체험형 공방 등 마을수익사업과 결합	12.7		0	12.7
			남원 여인숙
			숲정이 공작소
		숲정이마당 포켓갤러리		2.30	빈 공터, 소골목을 활용한 주민 커뮤니티 시설 확충	2.3		1.1	1.2
숲정이 ‘터’ 이야기	소 계(5개 사업)			59.1		59.1		4.0	55.1
	지역 공공 앵커 공간 조성	씨앗 플랫폼 (어울림 플랫폼)	터미널 센터	18.20	대상지내 유휴공간을 활용한 도시재생 네트워크 거점 조성 청년 창업, 자생적인 도시재생, 노인돌봄케어, 공동육아나눔터, 가족품앗이가 융합된 도시재생 복합시설 플랫폼	45.7		4.0	41.7
			남원 트리 지원센터	6.50
			숲정 관리 센터	21.00
	유휴 공간 활용	남원 이야기		5.90	남원 내 지자체 및 협동 조합 연계한 지역 홍보관	5.90		0	5.9
		아트 리모델링		7.50	주민공모를 통해 빈 점포를 활용, 특화디자인 리모델링	7.50		0	7.5
숲정이 ‘길’ 이야기	소 계(4개 사업)			15.21		15.21		4.9	10.31
	남원길 이어주기	몽룡 보듬길		6.67	도시재생 거점거리조성 교통,의료,도시재생 앵커시설	6.67		4.5	2.17
		숲정이 저잣거리		2.62	지리산테마 도시락거리, 전통주 관련 숲정이 저잣거리 조성	2.62		0.2	2.42
		춘향 마중길		3.27	걷고 싶은 거리 및 특화거리 조성, 요천로 연계	3.27		0	3.27
	마을길 만들기	숲정이 삶길, 놀길 동헌 예길		2.65	주민 커뮤니티 시설 위치한 골목길 연계 및 성격 부여	2.65		0.2	2.45
숲정이 ‘앎’ 이야기	소 계(4개 사업)			7.0		7.0		1.0	6.0
	주민역량 강화사업	마을재생활동가 육성		2.0	도시재생 마을학교	2.0		1.0	1.0
		마을기업육성		2.0	남원 트리, 뚝딱 집수리단	2.0		0	2.0
	지역특색 강화사업	찾아가는 컨설팅		1.0	구역별 테마 및 MD계획 창업자 대상 맞춤 컨설팅	1.0		0	1.0
		건강특화 사회적 기업 육성		2.0	지역의료 시설 연계 사회적 기업 육성	2.0		0	2.0

남원 일반산업단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위치/면적 : 사매면 월평리 산37-3번지 일원

- 토지이용계획 : 777천㎡(산업시설 588, 지원시설 6, 공공시설 183)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 주요유치업종 : 금속, 음료식품, 전자, 전기장비, 자동차부품 등

◦ 총사업비 : 640억원(특별교부세 10, 시비 630)

◦ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	총 계	기투자	2017	2018	2019	2020이후	비고
총 계	640	222	100	172	25.5	120.5
공 사	345		90	166	24.5	71.5	폐수처리부담 (48억원)포함
보 상	190	185	1	4
용 역	45	32	4	1	1	7
기 타	53	5	5	1		42

□ 추진실적

◦ 일반산업단지 조성 사업(1차분) 준공	: ‘18.  5. 25.

◦ 일반산업단지 조성 사업(2차분) 착공(전체 공정률 38%)    : ‘18.  4. 23.

◦ 미철거 이전 지장물 방해배제단행⋅인도단행가처분 신청  :  ‘18. 12. 11.

□ 금후계획

◦ 가처분신청 인용시 미철거 이전 지장물 철거 추진      : ‘19. 2.

◦ 산업단지조성 개발계획 변경 추진(지방산업단지계획 심의위원회 심의) : ‘19. 2.

- 공공폐수처리시설 (연계처리) 14,496㎡, 농기계수리점 3,631㎡

◦ 산업단지 조성사업 추진(공정률 85%)                  : ‘19. 12.

남원 일반산업단지 국고지원사업

[진입도로, 공업용수도, 공공폐수처리시설]

□ 개    요

◦ 사업별 상세조서

(단위 : 억원)

구 분	총 계	진입도로	공업용수도	공공폐수처리시설	비고
총사업비	352	146	94	112
사 업 량		L=2.1㎞(B=19~22m) 북측 0.9㎞, 남측 1.2㎞	관로 L=16㎞(D350㎜) 배수지(2,000㎥) 1식	Q=2,000㎥/일
사업기간		2016~2019년	2017~2020년	2018~2021년
진행과정		공사중 (공정률 90%)	공사중 (공정률 12%)	실시설계 추진 (‘18. 7~‘21.12.)

◦ 연도별 투자계획                                        (단위 : 억원)

구 분	총계	기투자	2017	2018	2019	2020	2021이후	비 고
총 계	352	75	55	43	54	68	57
진입도로(국비)	146	75	51	20
공업용수도(국비)	94		4	18	29	43
공공폐처리시설(국비)	112			5	25	25	57

□ 추진실적

◦ 진입도로 및 공업용수도 건설사업 정상추진(도로90%, 수도25%) : ‘18.  4. 16.

◦ 공공폐수처리시설

- 공공하수처리장 폐수연계처리 검토보고	: ‘18.  2. 14.

- 폐수연계처리 실시설계 용역 착수                        : ‘18.  7. 27.

- 산업단지 공공폐수처리 설치사업 추진계획보고     : ‘18. 11. 14.

□ 금후계획

◦ 진입도로 개설사업 준공	: ‘19. 6.

◦ 공업용수도 건설사업 (배수지 2지, 관로 7.2km , 공정률 55%)   : ‘19. 12.

◦ 폐수처리 방식 결정에 따른 용역추진

- 연 계 처 리 :  실시설계용역 재착수 추진            : ‘19. 1.~ ‘19. 5.

- 공공폐수처리 :  실시설계용역, 지방재정투자심사 추진         : ‘19. 1.~ ‘19. 12.

도시공원 내 사유지 매입

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 8개소(금암,월락,향교,왕정,신촌,운봉,인월,노암)

◦ 면    적 : 2,661천㎡(사유지 1,881천㎡, 국․공유지 780천㎡)

◦ 사 업 비 : 160억원(시비)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2023년(7년간)

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	160	10	20	30	100
균 특
도 비
시 비	160	10	20	30	100

□ 추진실적

◦ 도시공원 사유지 매입에 따른 우선 관리지역 계획 수립 : ‘18. 10. 26.

- 우선관리지역 시설물(등산로, 체육시설 등) 조사 반영

◦ 금암공원 부지매입·물건보상 추진(10,687㎡/10.2억)	: ‘18. 11. ~ 12.

◦ 향교공원·왕정공원 25필지 감정평가 실시	: ‘18. 11. 27. ~ 12. 6.

- 향교공원 부지매입 추진(56,157㎡/9억)	: ‘18. 12. 7. ~ 12. 26.

□ 금후계획

◦ 도시관리계획(도시공원)변경 결정용역에 반영	: ‘18. 12. ~ ‘19. 2.

◦ 도시공원 사유지 연차적 매입 추진	: ‘18. 12. ~ ‘23. 6.

- 향교·왕정공원 우선매입추진(792천㎡)

- 금암공원 부지매입 추진(5,317㎡/1.4억/95%)	: ‘19. 1월 중

◦ 토지매입 안내문 발송, 개별방문 설명, 읍면동 협조 등을 통하여 협의매수 중점 추진

중앙공원 조성

□ 개    요

◦ 위     치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원(옛 전라선부지, 남원읍성 일원)

◦ 면    적 : 51,300㎡             ※ 전라북도고시 제415호-‘00.12.29

- 중앙공원 41,247㎡ / 남원읍성 복원지역 10,053㎡

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5년간)

◦ 총사업비 : 141.28억원(균특 38.87, 시비 102.41)

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	141.28	97.81	4.6	2.5	36.37
균 특	38.87			2.5	36.37
도 비
시 비	102.41	97.81	4.6

□ 추진실적

◦ 부지매입 추진(한국철도공사→남원시, 38,652㎡/97.81억)  : ‘17. 6. 23.

◦ 중앙공원 기본계획수립 용역 착수	: ‘18. 3. 20.

◦ 기본계획용역 추진상황보고(2회)	: ‘18. 7. 31./12. 4.

◦ 주민설명회개최 및 시민단체 간담회 추진(4회)	: ‘18. 8. 21. ~ 12. 12.

◦ 문화재 시굴조사 추진	: ‘18. 10. ~ ‘19. 5.

◦ 중앙공원 명칭 공모 추진	: ‘18. 11. 26. ~ 12. 21.

◦ 남원시의회 경제건설위원회 보고	: ‘18. 12. 14.

◦ 기본계획(안) 주민설명회 개최	: ‘19. 1. 8.

□ 금후계획

◦ 기본계획(안) 최종보고	: ‘19. 1. 11.

◦ 중앙공원 기본계획수립 용역 완료	: ‘19. 1. 13.

◦ 문화재 시굴조사결과 유구 발견 시 발굴조사 실시	: ‘19. 5. ~ 9.

◦ 기본계획을 반영한 실시설계 및 제반용역	: ‘19. 9. ~ 12.

※ 제반용역 : 교통성 평가, 사전재해영향성 검토, 환경영향 평가 등

금암공원 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 면    적 : 40,000㎡            ※ 전라북도고시 제520호-‘63.8.26.

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2025년(9년간)

◦ 총사업비 : 164억원(부지매입 10, 용역비 3, 공원조성 151)

◦ 사업내용 : 근린공원 조성 1식

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	164	10	3	20	131
균 특
도 비
시 비	164	10	3	20	131

□ 추진실적

◦ 중앙공원 기본계획수립 용역 착수	: ‘18. 3. 20.

◦ 기본계획용역 추진상황보고(2회)	: ‘18. 7. 31./12. 4.

◦ 주민설명회 개최 및 시민단체 간담회 추진(3회)	: ‘18. 8. 21. ~ 10. 1.

◦ 남원시의회 경제건설위원회 보고	: ‘18. 12. 14.

◦ 기본계획(안) 주민설명회 개최	: ‘19. 1. 8.

□ 금후계획

◦ 기본계획(안) 최종보고	: ‘19. 1. 11.

◦ 금암공원 기본계획수립 용역 완료	: ‘19. 1. 13.

◦ 기본계획을 반영한 실시설계용역 추진	: ‘19. 2. ~ 6.

※ 제반용역 : 교통성 평가, 사전재해영향성 검토, 환경영향 평가 등

◦ 공사발주 및 시행	: ‘19. 7. ~

어린이공원 새단장

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 면    적 : 21,000㎡

◦ 총사업비 : 55억원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)

◦ 사업내용 : 물놀이형 조합놀이대(워터파크) 및 어린이공원 새단장

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

재 원 별	총사업비	기투자	2018	2019	2020이후	비 고
계	55		9	11	35
워터파크	43		7	9	27
새 단 장	12		2	2	8

□ 추진실적

<워터파크>

◦ 어린이공원 워터파크 조성 추진계획 수립	: ‘18. 9. 18.

◦ 어린이공원 워터파크 실시설계용역	: ‘18. 10. ~ ‘19. 2.

<새단장>

◦ 어린이공원 노후된 시설물(화장실 등) 재정비 계획 수립    : ‘18. 10. 15.

◦ 어린이공원 화장실 실시설계용역	: ‘18. 10. ~ 11.

- 대상지구 : 2개소(시청북문·녹주맥반석옆 어린이공원)

- 어린이공원내 공중화장실 증축 및 신축공사 발주     : ‘19. 1. 10.

□ 금후계획

◦ 조산지구 어린이공원 워터파크 조성사업 추진	: ‘19. 2. ~ 6.

- 도시관리계획 반영 및 실시설계용역 준공	: ‘19. 2.

- 어린이공원 워터파크 사업추진(개장일 : 7월초순)     : ‘19. 2. ~ 6.

◦ 어린이공원 새단장 추진	: ‘19. 1. ~ 4.

- 실시설계 용역 추진	: ‘19. 1. ~ 2.

- 사업추진	: ‘19. 2. ~ 4.