2019. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

5분발언 추진상황

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 도로 설해 관리 대책

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 시도 확포장

◦ 농어촌도로 확포장

◦ 통행불편 마을 진입로 정비

◦ 위험도로 선형 개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천정비 종합계획 재수립 용역

◦ 소하천 정비사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 유지관리사업

□ 5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											진 영 신
건설행정담당										도로담당														하천담당
이 재 우										성 길 경														백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속										읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	38	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 2 □공 무 직 : 17
현 원	38	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 2 □공 무 직 : 17 - 휴직(1) 포함
증 감	-	-	-	-	-	-	-

2019년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 시민만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 민원사항 즉시처리 및 시설정비예산 우선투자로 도로유지관리 집중 ·도로 재포장공사 및 교량 유지보수 등 48개 지구 3,465백만원 추진 중 - 하천재해예방을 위하여 지방하천, 소하천 하도준설 추진(65건) - 국가하천(요천, 섬진강), 지방하천 하천시설물 정밀안전진단 추진(16건) - 읍면동에 하천유지관리를 위한 장비임차료 예산을 편성하여 시급한 하천 수목제거, 하도준설 추진(4억원) ◦ 시민 교통편의 및 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 계속사업 : 17개 지구 / 15.35km / 7,250백만원 - 신규사업 : 13개 지구 / 11.38km / 4,430백만원 ◦ 지방재정확충을 위한 국가예산확보에 총력 - 특별조정교부금, 도비보조금 730백만원 확보(조 220 / 도 510 / 시 790백만원) ※ 특별조정교부금 : 청계천, 사석2천(조 220 / 시 100백만원) 도비보조금 : 일대천, 도장천, 요천(도 510 / 시 690백만원) ◦ 수경시설(분수) 벤치마킹을 통한 사업 공감대 형성 - 일 시 : `18.10.30 / 출장지 : 세종시 방축천 음악분수 - 일 시 : `18.12.12 / 출장지 : 서울시 중량천 ․ 고덕천, 남양주시 왕숙천 물놀이장 - 일 시 : `19.05.17 / 출장지 : 서울시 안양천 2지구 물놀이장 - 타 지역 물놀이장 시설 벤치마킹을 통해 모범사례 적극 도입하여 사업의 효율성 극대화에 공감대 형성

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 – 30개 지구 / L=26.73km / 11,680백만원

◦ 읍면지역시도 확포장  4개 지구	/  4개 지구 추진(L=8.00km/2,900백만원)

◦ 농어촌도로 확포장    6개 지구	/  6개 지구 추진(L=9.02km/2,700백만원)

◦ 통행불편 마을진입로  14개 지구	/ 14개 지구 추진(L=7.39km/4,030백만원)

◦ 위험도로 선형개량    6개 지구	/  6개 지구 추진(L=2.32km/2,050백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 48개소 / 3,465백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리사업 추진	: 14개소 /   453백만원

- 민원사항 및 시정설명회 건의사항, 유지관리 등

◦ 농어촌도로 유지관리사업 추진	: 11개소 / 1,153백만원

- 재포장 및 인도개설 등

◦ 법정도로 유지관리사업 추진	: 19개소 /   926백만원

- 남원시 교량내진보강 및 보수보강사업, 전수조사DB용역 추진

- 동지역 도로 유지관리(표지판, 과속방지턱, 교통시설물 등)

◦ 노후 도로시설물 정비	:  3개소 /    633백만원

- 춘향교 인도정비, 걷고싶은 거리조성, 화단형 중앙분리대 등

◦ 주생면 소지교차로 회전교차로 사업 추진	:  1개소 /   300백만원

□ 재해 사전예방을 위한 하천정비 – 15개 지구 / 20,224백만원

◦ 지방하천 정비	:  3개소 / 4,684백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성	:  1개소 / 2,400백만원

◦ 소하천 정비(보조)	:  3개소 / 4,504백만원

◦ 소하천 정비(자체)	:  6개소 / 4,320백만원

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	:  1식   / 2,920백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천, 기성제, 수경시설 등)	:  1식   / 1,396백만원

	하반기 추진방향
◦ 읍면지역 간선도로를 개설하여 주요 거점간의 교통 접근성 개선 및 지역 균형발전 기여 ◦ 시정설명회 시 통행불편에 대한 주민 요구사항 적극 반영하여 도로기반 확충 ◦ 관내 주요 간선도로망 확충을 위한 국가예산확보 적극 대응 ◦ 하천정비사업을 통해 이·치수와 더불어 친수 공간 조성에 기여 ◦ 태풍 및 집중호우로 인한 하천재해를 사전에 예방하기 위하여 하도준설 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

도로 설해 관리 대책

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2019. 11. 15. ~ 2020. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 30명[도로보수원 12, 운전원 8(자체 2, 용역 6), 기타 10]

◦ 제설 차량 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1〕

◦ 제설 장비 : 236대

- 자체 보유 : 제설기 12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

살포기 12대(15톤용 6/ 5톤용 1/ 1톤용 5)

- 읍면동(19) : 제설기 212대(트랙터용 209/ 1톤용 3)

◦ 제설 자재 : 염화칼슘 110톤 / 소금 1,390톤 / 친환경 제설제 496톤

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 5명), 각 읍면동사무소

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재구입	: ‘18. 10. ~ ‘19. 1.

◦ 도로제설작업 추진(9회)	: ‘18. 11. ~ ‘19. 3.

- 대설주의보 1회, 한파주의보 3회, 누적적설량 : 7.9㎝ (평균 0.8㎝)

- 투입장비 : 13대〔15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기 1〕

□ 금후계획

◦ 트랙터 부착용 제설기 구입	: 09월

◦ 미끄럼주의표지판(22개) 및 모래주머니(20,000매) 설치	: 10월

◦ 상황실[건설과(2개조 5명), 읍면동] 운영	: 11월

◦ 임차장비 용역시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: 12월

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2019년

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: ‘18. 4. ~ ‘19. 4.

- 상위계획 검토 및 실과소 자료 수집

- 교통량 조사 실시(25개소)

- 시군도 및 농어촌도로 각 노선별 현장조사(연장, 도로폭, 시설물 조사 등)

- 도시 교통 현황 분석 및 실태 조사(실과소 수집 자료와 현장 점검)

◦ 도로건설계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 협조요청(읍·면·동) : ‘19. 5.

- 추가적인 읍면지역 여건변화에 따른 주민의견 수렴기간 필요

- 전략환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 등 후속 행정절차 협의기간 소요

□ 금후계획

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: ‘19. 7. ~ ‘19. 9.

- 주요 도로 운영관리 체계 개선 방안 제시

(ex. 교육청사거리, 정령치구간, 인접시군과 연계 도로 구축 방안 등)

- 도로 현장 여건 변화 검토 및 수요 예측 조사

- 최적 도로망 체계 선정 및 연차적 투자계획 수립

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행	: ‘19. 7. ~ ‘19. 11.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: ‘19. 12.

읍면지역 시도 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 사업 / 36.46㎞ / 73,430백만원

◦ 기 투 자 : 15개 사업 / 28.46㎞ / 51,230백만원

◦ 시 행 중 :  4개 사업 /  8.00㎞ / 22,200백만원(※ 2019 : 2,900백만원)

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2022년(17개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개사업	8.00	22,200	2,300	2,900	17,000	23.4
부석~오촌	송동면	2.60	5,900	900	700	4,300	27	`17 ~ `21
오리정~상신	사매면	1.00	2,300	400	800	1,100	52	`17 ~ `20
평촌~강기	이백면	2.50	11,000	1,000	1,000	9,000	18	`17 ~ `22
도산~서매	주생면	1.90	3,000		400	2,600	13	`19 ~ `22

□ 추진실적

◦ 부석~오촌	: 토공 / 용지보상 추진

◦ 오리정~상신	: 1,2차분 토공 / 용지보상 추진

◦ 평촌~강기	: 주민설명회 5차 및 실시설계 보완용역 추진

◦ 도산~서매	: 실시설계용역 추진 / 1차 주민설명회

□ 금후계획

◦ 부석~오촌	: 토공, 구조물공 / 용지보상 추진

◦ 오리정~상신	: 토공, 구조물공 / 용지보상 추진

◦ 평촌~강기	: 공사 착공( ‘19. 6.) / 용지보상 추진

◦ 도산~서매         : 노선(안) 결정 및 용역 추진 / 용지보상 추진

농어촌도로 확포장

□ 개    요

◦ 계    획 : 22개 사업 / 24.88㎞ / 47,874백만원

◦ 기 투 자 : 16개 사업 / 15.86㎞ / 29,024백만원

◦ 2019시행 :  6개 사업 /  9.02㎞ / 18,850백만원(※ 2019 : 2,700백만원)

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2023년(18개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	6개사업	9.02	18,850	4,500	2,700	11,650	38
배촌선	주천면	2.20	5,500		400	5,100	7	‘19 ~ ‘21
장항교 재가설	산내면	0.30	2,600	2,300	300		100	‘17 ~ ‘19
도용선	주생면	0.67	1,650	300	700	650	61	‘17 ~ ‘20
상황선	산내면	0.60	1,500	50	1,000	450	70	‘18 ~ ‘20
견두선	수지면	4.00	6,000	250	300	5,450	9	‘18 ~ ‘23
행덕선	운봉읍	1.25	1,600	1,600			100	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 배 촌 선	: 실시설계용역 추진(공정30%)

◦ 장항교 재가설     : 교량개통, 부대공 시공

◦ 도 용 선	: 용지보상(50%), 1차분 공사추진, 2차분 공사발주

◦ 상 황 선          : 실시설계용역 완료, 분할측량 및 보상금산정

◦ 견 두 선	: 실시설계용역 추진

◦ 행 덕 선          : 용지보상 완료, 1차분 준공(‘19.1.), 2차분 공사추진(50%)

□ 금후계획

◦ 배 촌 선	: 중송구간 공사발주(‘19.7.), 웅치구간 실시설계 추진

◦ 장항교 재가설     : 부대공 및 공사준공(‘19.10.)

◦ 도 용 선	: 1차분 공사완료(‘19.6.), 2차분 공사완료(‘19.11.)

◦ 상 황 선          : 공사발주(‘19.6.) 용지보상 추진

◦ 견 두 선	: 실시설계용역 및 용지보상 추진

◦ 행 덕 선          : 공사준공(‘19.10.)

통행불편 마을 진입로 정비

□ 개    요

◦ 계    획 : 49개 사업 / 28.14㎞ / 24,266백만원

◦ 기 투 자 : 35개 사업 / 20.75㎞ / 12,216백만원

◦ 2019시행 : 14개 사업 /  7.39㎞ / 12,050백만원(※ 2019 : 4,030백만원)

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2020년(13개년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 : 6지구

- 인월중군, 송동신기, 이백오산길, 인월장평, 덕과수촌, 주천제바위

◦ 공사착공  : 3지구

- 덕과배산, 대산 안대실, 사매화정마을

◦ 공 사 중 : 5지구

- 아영신지, 보절내황, 이백계산, 대강대치, 금지방촌

□ 금후계획

◦ 실시설계 : 주민설명회개최 의견수렴 반영

- 인월 중군 외 5지구

◦ 공사추진 : 공정·품질·안전관리 / 견실시공 만전

- 아영 신지 외 7지구

□ 통행불편 마을 진입로 정비사업 세부내역

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	추진실적	계획
		계	기투자	2019	2020 이후
14개 사업	7.39	12,050	3,600	4,030	4,420	60
인월 중군마을 (‘17~’19)	0.78	1,550	950	600		100	실시설계	-1공구 : 발주및시공 -2공구 실시설계, 주민설명회
아영 신지마을 (‘17~’19)	0.31	1,200	900	300		100	시공,용지보상	시공, 용지보상
보절 내황마을 (‘17~’20)	1.04	1,600	400	700	500	25	시공,용지보상	시공, 용지보상
덕과 배산마을 (‘18~’19)	0.45	600	50	550		100	실시설계,착공	시공, 용지보상
대산 안대실마을 (‘18~’20)	0.46	1,800	50	600	1,150	36	실시설계,착공	시공, 용지보상
사매 화정마을 (’19) 신규	0.23	300		300		100	실시설계,착공	시공, 용지보상
송동 신기마을 (’19) 신규	0.32	500		100	400	20	실시설계	실시설계, 공사발주
이백 오산길 (’19~20) 신규	0.65	850		300	550	35	실시설계	실시설계, 공사발주
인월 장평마을 (’19~20) 신규	0.2	1,200		80	1,120	7	실시설계	실시설계, 공사발주
덕과 수촌마을 (’19) 신규	0.15	200		200		100	실시설계	실시설계, 공사발주
주천 제바위마을 (’19~20) 신규	0.70	1,000		300	700	30	실시설계	실시설계, 공사발주
이백 계산마을 (’17~‘19)	0.31	450	450			100	시공,용지보상	시공
대강 대치마을 (’18~‘19)	0.29	400	400			100	시공	시공 및 준공
금지 방촌마을 (’18~‘19)	1.50	400	400			100	시공	시공 및 준공

위험도로 선형 개선

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	6개사업	2.32	3,750	1,400	2,050	300	92
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.3	1,600	450	850	300	81	‘17 ~ ‘20
주생 상동	주생면	0.37	650	500	150		100	‘17 ~ ‘19
운봉 방현(북천)	운봉읍	0.14	400	50	350		100	`18 ~ `19
아영 율동	아영면	0.14	300	50	250		100	`18 ~ `19
수지 남창	수지면	0.15	500	50	450		100	`18 ~ `19
주천 가송	주천면	0.22	300	300			100	`18 ~ `19

□ 추진실적

◦ 군도29호선(아영)	: 1차분 추진, 2차분 착공  / 공정률 30%

◦ 주생 상동	: 1공구 공사추진(90%), 2공구 공사추진(5%)

◦ 운봉 방현(북천)	: 공사 착공

◦ 아영 율동	: 토지 보상 및 공사 착공

◦ 수지 남창	: 편입토지 협의 및 실시설계 추진

◦ 주천 가송	: 공사 추진(40%)

□ 금후계획

◦ 군도29호선(아영)	: 1차분, 2차분 완료(‘19.11.)

◦ 주생 상동	: 1공구(‘19. 6.) 완료, 2공구 공사 완료(‘19. 8.)

◦ 운봉 방현(북천)	: 관계기관 협의 및 공사 추진(‘19. 5. ~ 11.)

◦ 아영 율동	: 토지보상 실시, 공사 추진(‘19. 5. ~ 11.)

◦ 수지 남창	: 실시설계용역, 용지보상 협의 추진

◦ 주천 가송	: 공사완료(‘19. 8.)

도로 유지관리사업

□ 개    요

◦ 총사업비 : 12,393백만원(국비 175, 조 150, 도비 60, 시비 12,008)

사 업 명	사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			12,393
읍면지역시도	관내	5개소	1,533
농어촌도로	관내	6개소	2,370
법정도로 유지관리	관내	9개소	8,490

□ 추진실적 – 48개지구 / 3,465백만원

▸ 읍면지역시도 유지관리

◦ 산동 상신마을 아스콘 덧씌우기 외 13개소 454백만원 추진 중

▸ 농어촌도로 유지관리

◦ 이백면 내동삼거리 도로정비공사 외 10개소 1,153백만원 추진 중

▸ 법정도로 유지관리

◦ 승사교~동림교 재포장공사 외 22개소 1,858백만원 추진 중

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·법정도로 유지관리 추진  : ‘19. 6. ~ 12.

◦ 아스콘 재포장, 과속방지턱, 교량(터널)유지관리, 배수개선, 시설물 정비 등

◦ 공사 추진 : 공정·품질·안전관리 / 견실시공 만전

- 고죽교차로~갈치교차로 도로확포장공사	: ‘19. 6. ~ ‘20. 6.

- 주생면 소지교차로 회전교차로사업	: ‘19. 5. ~ 12.

- 사매 용북중학교 및 인월농공단지 인도정비공사	: ‘19. 6. ~ 10.

□ 도로 유지관리사업 세부내역

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	추 진
합 계			20개소	12,393
읍면지역시도 유지관리			5개소	1,533
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식	600	10월 완공
	백암2교 개선공사	관내	교차로개선 1식	100	7월 완공
	산동 석동마을	산동면	진출입로 개설 L=2.0km	50	9월 완공
	주민참여예산	관내	유지관리사업 6개소	483	10월 완공
	대강 양촌 진입로 정비	대강면	진입로 정비 L = 105m	300	6월 완공
농어촌도로 유지관리			6개소	2,370
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식	600	10월 완공
	사매 용북중학교 인도	사매면	인도설치 L=720m	720	10월 완공
	이백 효촌마을 재포장	이백면	아스콘 재포장 L=700m	400	8월 완공
	이백 내동마을 재포장	이백면	아스콘 재포장 L=400m	100	6월 완공
	주천 회덕마을 세월교	주천면	교량 재가설 L=260m	250	9월 완공
	인월 농공단지 인도개설	인월면	인도개설 L=0.42m, B=2m	300	8월 완공
법정도로 유지관리			9개소	8,490
	교량터널유지관리	관내	법정교량(터널) 정비 등	도 60 시 1,140	10월 완공
	도로유지관리	관내	유지관리사업 1식	640	10월 완공
	법정도로 재포장	관내	아스콘 재포장 L=11.4km	3,100	9월 완공
	고죽~갈치 교차로 확포장공사	고죽동	회전교차로 1개소 확포장 L=0.63m, B=25m	국 140 시 1,140	‘20.6. 완공
	동림교 사거리 개선공사	죽항동	교통시설개선 1식	국 35 시 35	6월 완공
	춘향교 인도정비 및 택지지구 정비	도통, 어현동	인도포장 L=0.15m 도로측구보수 L=0.7m	600	8월 완공
	걷고싶은 거리 조성	노암, 어현동	인도유지보수 L=3.9km	900	8월 완공
	백공산4가 ~ 남원I.C 화단형 분리대 설치	월락동	화단형 중앙분리대 설치 L=260m	400	9월 완공
	주생 소지교차로 설치공사	주생면	회전교차로 1식	조 150 시 150	9월 완공

지방하천 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

◦ 총 계 획 : 21개지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- ‘19년 사업 : 4개지구 / 7,660백만원〔국비 3,830, 도비 1,532, 시비 2,298〕

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2019	2020이후
합 계	4개하천	23.87	70,192	19,384	7,660	43,724	25
풍 천	소 계	5.53	37,351	13,284	2,724	21,343	35	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961			100	`17년준공
	풍천지구	4.65	30,390	6,323	2,724	21,343	21	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,466	3,500	2,296	4,246	37	`16 ~ `20
원천천	신촌~주천	14.6	18,821	1,800	2,400	14,621	10	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.7	4,554	800	240	3,514	18	`18 ~ `22

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 도 지방건설기술심의, 1차분 착공        / 공정률  4%

◦ 송치천 : 교량 2개소, 호안시공 L=1.0km, L형옹벽 4개소, 토지보상 병행 / 공정률 40%

◦ 원천천 : 실시설계 용역 추진(익산청, 국토부, 전북도 / 4회 협의)      / 공정률 80%

◦ 다산천 : 실시설계 용역 추진(주민설명회 개최, 익산청 1차 협의)        / 공정률 55%

□ 금후계획

◦ 풍  천 □ 인월지구 편입용지 보상	: ‘19.  1.

□ 공사 추진	: ‘19.  1. ~ ‘22. 12.

◦ 송치천 : 3차분 공사 추진(교량 1개소 시공)	: ‘19.  1. ~ ‘19.  6.

◦ 원천천 □ 지방건설기술심의 및 총사업비 변경승인 : ‘19.  8.

□ 조달청 원가심사 및 공사 발주    : ‘19.  9.

◦ 다산천 □ 실시설계 완료 및 총사업비 변경승인	: ‘19.  8.

□ 조달청 원가심사 및 공사 발주    : ‘19.  9.

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 인도교 ~ 주천면 고기리

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간조성 L=15.6㎞ (원천천 14.6㎞, 요천 1.0㎞)

- 축제 2.48km, 자전거길 7.8㎞, 보․낙차공 18개소, 교량 10개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

◦ 총사업비 : 20,510백만원〔국 11,100(54%), 도 3,760(18%), 시 5,650(28%)〕

- 요  천 (국가하천  1.0km / 익산청)  :   1,689백만원(국 100%)

- 원천천 (지방하천 14.6km / 우리시)  : 18,821백만원(국 50%, 도 20%, 시비 30%)

※ ‘19년도 사업비 : 2,400백만원

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진 (총용역비 1,245백만원)      : ‘16.  9. 28. ~ ‘19. 6. 30.

◦ 착수보고회 및 자문위원 사업설명회 개최	: ‘16. 10. 21.

◦ 기본 및 실시설계 (안) 확정	: ‘18.  5.  3.

- 익산청 하천계획과 협의 완료 (현장 방문, 3회 협의)

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: ‘18.  08. 03.

◦ 주민설명회 개최	: ‘18.  11. 29.

◦ 실시설계 (안) 총사업비 변경 협의(1차) / 익산청	: ‘19.  03. 27.

- 사업비 : 당초 18,821백만원 → 변경 24,147백만원(증5,326)

◦ 설계 경제성검토 완료                         : ‘19.  05. 04.

□ 금후계획

◦ 전북도 지방건설기술심의                     : ‘19. 6. ~ 7.

◦ 총사업비승인 협의절차 이행 (익산청 / 국토부)   : ‘19. 7. ~ 8.

◦ 조달청 원가심사 및 공사 발주	: ‘19. 8.

소하천정비 종합계획 재수립 용역

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 관내 소하천 347개소(L=389.6㎞)에 대한 종합계획 재수립

◦ 총사업비 : 5,837백만원(시비 100%) / ◦ 용역기간 : 2015 ~ 2019년 (5개년)

◦ 용역대상 : 347개소 / L=389.6㎞를 2개 권역으로 분할 용역 발주 추진

◦ 법적근거 : 소하천정비법 제6조(소하천정비종합계획의 수립) 및 같은 법 시행규칙 제3조

(단위 : 백만원)

권 역 별	사업량	총사업비	투자	용역기간
합 계	347개소/L=389.6㎞	5,837	5,837	`15 ~ `19
섬진강 권역	272개소/L=292.4㎞	3,572	3,572	‘15 ~ ‘19
낙동강 권역	75개소/L=97.2㎞	1,315	1,315	‘16 ~ ‘19
전략환경평가	전구간	950	950	‘17 ~ ‘19

□ 추진실적

◦ 소하천정비종합계획 재수립용역 시행

- 섬진강 수계 : ‘15. 7. 31 - 낙동강 수계 : ‘16. 4. 15 - 전략환경영향평가 : ‘17. 9. 20.

◦ 소하천 중복지정 관리기관 협의(한국농어촌공사 남원지사)  : ‘15. 10. / ‘18. 11.

◦ 소하천관리위원회 구성 및 위원 위촉	: ‘17. 10. 27.

◦ 소하천 지정(신규․폐지․조정) 주민의견청취 공고	: ‘18.  7.  6. ~  7. 20.

◦ 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최	: ‘18.  9. 10. ~ 11. 13.

◦ 전북도 자연재난과 협의(1차) 및 검토의견 반영	: ‘19.  4.  4. ~  4. 29.

□ 금후계획

◦ 기초 소하천관리 위원회 개최	: ‘19.   5. ~  6.

◦ 전략환경영향평가 본안 협의(새만금지방환경청/45일 소요)	: ‘19.   6. ~  7.

◦ 전북도 자연재난과 협의(2차)	: ‘19.   8. ~  9.

◦ 광역 소하천 관리위원회 심의	: ‘19.   8. ~ 10.

◦ 소하천대장 전산화 및 지형도면고시, 사업완료	: ‘19.  10.

소하천 정비사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 :  6개지구 /  4.31㎞ / 13,417백만원

(율치천, 율정천, 아곡천, 뒤하천, 신동천, 장교천)

- ‘19년사업 : 5개지구 8.7km / 6,204백만원〔국비 1,552 (25%), 시비 4,652 (75%)〕

◦ 위    치 : 수지면 고평천 외 4개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2022년(7개년)

구분	지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2019	2020이후
합 계		5개 하천	8.70	20,146	3,012	6,204	10,930	46
보조	소계	3개 하천	7.35	17,046	3,012	3,104	10,930	36
	고평천	수지 고평	2.30	7,745	2,692	2,332	2,721	65	‘16~‘20
	당동천	아영 봉대	3.40	7,401	320	400	6,681	10	‘18~‘22
	오롱골천	운봉 주촌	1.65	1,900		372	1,528	20	‘19~‘20
자체	소계	2개 하천	0.85	3,100		3,100		100
	천사천	월락동	0.35	1,600		1,600		100	‘19~‘20
	양선천	덕과 신양	1.00	1,500		1,500		100	‘19~‘20

□ 추진실적

◦ 고평천   □ 1·2·3차분 준공	: ‘17.  5. 10. ~ ‘18. 12. 19.

□ 4차분 착공 (공정 40%)	: ‘19.  3.  7. ~ ‘19. 11.  1.

◦ 당동천   □ 실시설계 용역 착수	: ‘18.  2. 21. ~ ‘19.  4. 30.

□  중앙사전설계검토 승인	: ‘18. 12. 21.

◦ 오롱골천 □ 실시설계 용역 착수	: ‘19.  2. 27. ~ ‘19.  8.  5.

□  현장조사 및 측량, 수리검토 완료	: ‘19.  3.  1. ~ ‘19.  4. 30.

◦ 천사천, 양선천 – 용역 착수, 주민설명회 개최	: ‘18. 12. 19. ~ ‘19.  4. 30.

□ 금후계획

◦ 고평천    - 4차분 공사 추진	: ‘19.  3. ~ 12.

◦ 당동천   □ 조달청 원가심사 및 공사발주	: ‘19.  6. ~  7.

□  편입용지 보상 및 공사 추진	: ‘19.  1. ~ 12.

◦ 오롱골천 □ 실시설계 용역 추진	: ‘19.  1. ~  6.

□  편입용지 보상 및 공사 추진	: ‘19.  7. ~ 12.

◦ 천사천,양선천 □ 실시설계 용역 추진	: ‘19.  1. ~  6.

□ 편입용지 보상 및 공사 추진	: ‘19.  7. ~ ‘20. 11.

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

<요천 수변 관광 자원화 사업>

□ 개    요

◦ 위    치 : 쌍교동 요천 지내 / 국가하천

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장

- 음악분수 L=45.0m, 바닥분수(2) 및 광장, 물놀이시설 A=680㎡

◦ 총공사비 : 9,300백만원(국비 1,900 도비 1,500 시비 5,900)

- ‘18년 사업비 : 3,500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설 설치 추진계획 보고	: ‘17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ‘17. 10. ~ ‘18. 12.

◦ 수경시설 추진 쟁점사항 보고	: ‘18.  9. 25.

◦ 간부회의 현안토론 개최	: ‘18. 10. 15.

- 요천 내 수경시설(분수) 추진사항 및 쟁점사항 보고(자연재해, 유지관리 문제점)

◦ 사업계획 변경 추진보고	: ‘18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 하천점용허가 협의(익산지방국토관리청)	: ‘19.  3.  6.

◦ 2019년 제1차 재정투자 심의(전북도)	: ‘19.  3. 22.

◦ 문체부 신규 관광자원개발사업 신청	: ‘19.  4.

◦ 음악분수디자인 및 공법선정 제안공모	: ‘19.  4. 25. ~ 6. 10.

□ 금후계획

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰(조달청)	: ‘19. 7. ~ ‘19. 9.

◦ 시설공사 추진	: ‘19. 9. ~ ‘20. 5.

◦ 음악분수 및 물놀이 시설 운영	: ‘20. 6. ~

하천 유지관리사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =79.3km

◦ 사 업 비 : 3,982백만원(국비 976, 도비 48, 시비 2,958)

◦ 사업기간 : 2019년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	79.3	3,982
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	1,070
	하천 하도준설	20.0	1,400
	주민참여예산	3.1	440
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	2.3	96
국가하천 유지보수사업	국가하천 섬진강, 요천 유지관리	섬진강 21.0 요 천 17.9	976

□ 추진실적

▸ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업

◦ 읍·면·동 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: ‘18.  9. 28.

◦ 유지관리사업 실시설계 추진	: ‘18. 12. 27.

◦ 하천유지관리사업 추진	: ‘19.  1. 22.

- 하도준설 이백면 백암천 외 44개소(L=20.0km) 중 21개소 완료(L=11.28km) 및 23개소 추진 중

- 유지관리 대산면 신촌천 외 21개소(L=3.78km) 중 9개소 완료(L=0.79km) 및 12개소 추진 중

◦ 시특법 관리대상 배수통문 정밀점검 용역 추진(지방하천)	: ‘19.  3. 18.

▸ 국가하천 유지보수사업

◦ ‘19년 국가하천 유지보수 국비예산 교부	: ‘19. 3. 21.

◦ 시특법 관리대상 배수통문 외 정밀점검 및 성능평가 용역 추진(요천)	: ‘19. 3. 26.

◦ 시특법 시설물 보수공사 실시설계 용역 추진	: ‘19. 4.  1.

◦ 국가하천 데크 및 제방도로 유지보수공사 용역 추진	: ‘19. 4. 10.

□ 금후계획

▸ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업

◦ 하반기 하천유지관리 대상지 조사 및 선정	: ‘19. 7. ~ 8.

◦ 하반기 하천유지관리사업 추진	: ‘19. 9. ~

◦ 하천유지관리 대상지 수시 점검 및 공사 추진	: 연중 수시

▸ 국가하천 유지보수사업

◦ 국가하천유지보수사업 추진(데크 및 제방도로 등)	: ‘19. 6. ~ 7.

◦ 국가하천유지보수 신규사업 익산청, 전북도 협의 추진	: ‘19. 10. ~

◦ 섬진강‧요천 보수 대상지 조사 및 공사추진	: 연중 수시

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2018. 9. 18. (제225회)		발언의원 : 전평기 의원
발언내용	산남마을 우회도로 개설 제안
◦ 이백면 산남마을 우회도로 개설제안 - 광주~대구간 고속도로 확장 개통과 고속도로 (군도 25호선) 이관 후 대형차량 통행량이 늘어 산남·남평·계산마을 주민 불편 및 생명 위험 - 남원~장수간, 동남원I.C 진출입차량, 군도 17호선 이용차량이 마을을 우회함으로써 주민들의 생명과 재산권 보호 필요 ※ 대상마을 : 89가구 174명(산남 51가구, 101명 / 남평 38가구, 73명)
추진상황
◦ 동남원I.C 주변도로(군도 17, 25호)와 「도로건설 관리계획 및 농어촌 도로 기본계획(변경) 용역)」을 통해, 교통 접근성, 경제성(사업비), 기존도로 차량 가능성 등 종합적인 도로 노선 검토 병행 : ‘19. 3. ~ ◦ 도로건설관리계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 협조요청 : ‘19. 5. ~ - 추가적인 읍면지역 여건변화에 따른 주민의견 수렴 중(읍·면·동) < 용 역 개 요 > - 용 역 명 : 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획(변경 용역) - 위 치 : 남원시 읍·면지역 - 사 업 량 : 읍면지역 시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6km - 사 업 비 : 500백만원(시비) - 과업기간 : 2018. 4. ~ 2019. 12.

□ 참 고 도

□ 현황사진

발언일자 : 2019. 4. 9. (제230회)		발언의원 : 손중열 의원
발언내용	육모정~고기삼거리 구간 자동염수분사장치 및 스노우멜팅 설치
◦ 육모정~고기삼거리(국지도 60호선-겨울철 통제구간) 결빙구간에 자동 염수분사장치 및 스노우멜팅 설치
추진상황
◦ 주천 육모정~고기삼거리 구간(L=6.5km) 자동염수분사장치 및 스노우 멜팅(열선) 설치 건의 - 전라북도 도로관리사업소 : ‘19. 4. ⇒ 유관기관(지리산국립공원 전북사무소, 남원경찰서)과 협의하여 일부 구간(상습결빙구간)에 자동염수분사장치 및 스노우멜팅이 설치될 수 있도록 협의 추진하겠음