2020. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

환 경 사 업 소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 강우시 하수관로 시범사업

◦ 노후하수관로 정비사업

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업

◦ 마을하수도 설치사업

◦ 남원공공하수처리시설 개선 및 운영관리

◦ 요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

◦ 소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

◦ 운봉□인월 및 소규모 하수처리시설 관리대행 실시

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 소규모 마을하수 및 중계펌프 시설 원격감시제어 구매 및 설치

◦ 운봉□인월 하수처리시설 총인시설 제어반 교체

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									강 인 식
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					강 자 청								양 병 우										문 하 성
∘행정종합계획수립 ∘회계, 시설물관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘생태습지공원 관리					∘하수도 중장기계획 수립 및 추진 ∘하수관거정비, 마을하수도 사업 시행 및 유지관리								∘남원하수처리장 운영 ∘음식물처리시설 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘하수슬러지 처리시설 관리·감독										∘운봉․인월하수 처리장 운영 관리 ∘소규모하수처리시설 운영 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	25	1	4	6	7	7
현 원	22	1	8	4	3	6	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 3
증 감	△3	-	4	△2	△4	△1

2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 남원(3단계) 하수관로 및 노후 하수관로 정비사업 본격추진 ◦ 운봉□인월 및 소규모마을하수처리시설 관리대행 실시 ◦ 하수처리 노후 시설물 개선을 통한 안정적인 수질관리 ◦ 요천생태습지공원 기간제 추가채용으로 탄력적 운영 가능 ◦ 코로나19로 인한 시민어려움 해소방안으로 하수도사용료 인상 일정 연기 (2021년 1월납기분부터 적용)

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관리 시범사업 및 하수관로 정비사업

- 차집관로 및 2단계 하수관로 정비사업 공사추진

- 3단계 하수관로 및 노후 하수관로 정비사업 공사착공

◦ 마을하수도 설치사업

- 용전지구 및 서도지구 마을하수도 설치사업(관로, 처리장) 공사추진

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수

- 처리상태 : BOD 2.1㎎/L, SS 3.7㎎/L, T-N 11.242㎎/L, T-P 0.070㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 요천생태습지공원 수목 식재 및 고사목 제거, 쉼터조성, 야구장 흙보강 등 추진

◦ 요천생태습지공원 애견놀이터 개장시간 조정으로 연장운영 가능

◦ 요천생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

	하반기 추진방향
◦ 용전□ 서도지구 마을하수도 설치사업 완료 ◦ 소규모마을하수처리시설(양평) 개량사업 완료 ◦ 요천생태습지공원 지속적인 시설정비로 시민 휴식공간 조성

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

강우시 하수관리 시범사업

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 2,900여 가구
총사업비		➢ 42,000백만원(국29,400, 시12,600) ➢ 기투자 : 31,911‘20년 : 259 ‘20년까지 투자실적 ⇒ 77%		➢ 28,000백만원(국19,600, 시8,400) ➢ 기투자 : 22,055‘20년 : 851 ‘20년까지 투자실적 ⇒ 82%
사업기간		➢ 2015~2021		➢ 2015~2021

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 02.

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 03.

◦ 용역 발주	: 2015. 06.

◦ 기본설계 완료에 따른 VE검토 추진	: 2016. 05.

◦ 하수도정비기본계획(변경) 수립	: 2016. 05. ~ 07.

◦ 공사착공	: 2018. 10.

◦ 공 정 율 : 58%	: 2020. 05월 현재

(차집:31km 중 17km완료, 2단계: 57km중 45km완료, 배수설비 2,951가구 중 2,463가구 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 10월 까지

노후하수관로 정비사업

◦ 노후하수관로 정밀진단(2016.04) 결과에 따른 정비로 도로함몰 등 안전사고에 선제적 대응

◦ 1993년 조성된 도통1택지는 당시 기 분류식화 되었으나 오접과 노후화된

우□오수관로 및 배수설비 정비 추진

□ 개    요

◦ 사업위치 : 남원시 일원(시청주변-도통택지1지구)

◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비 L=6.9km, 배수설비 300여 가구

◦ 사 업 비 : 8,448백만원(국비 3,224, 시비 5,224)

※ 2020년 사업비 : 1,660백만원(국비 -, 시비 1,660)

- 국비 3,224백만원은 기 교부완료, 2020년은 미 반영된 시비반영

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 02. ~ 2017. 11.

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 05. ~ 2019. 07.

◦ 계약심의 완료                             : 2019. 08.

◦ 원가심사(전라북도) 완료	: 2019. 09.

◦ 공사발주                                  : 2019. 10.

◦ 입찰공고 및 적격심사                      : 2019. 11.

◦ 공사착공	: 2019. 12.

◦ 공 정 율 : 10%	: 2020. 05월 현재

(노후관로 6.9km 중 0.9km 완료, 배수설비 300가구 중 15가구 완료)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 12월 까지

남원[3단계] 하수관로 정비사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

- 향교, 신촌, 광치, 신정동, 이백(평촌, 효기)

주천(행정, 내송, 용궁, 무수, 배촌, 덕촌, 상주, 하주, 가송) 등

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 1,760 가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2020년 사업비 : 4,922백만원(국비 2,211 시비 2,711)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11.

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11. ~ 2019. 03.

◦ 행정절차 이행                             : 2019. 03. ~ 2019. 10.

◦ 공사착공	: 2019. 12.

◦ 공 정 율 : 5%	: 2020. 05월 현재

(관로설치 46.9km 중 0.5km 완료)

□ 쟁점 및 대책

◦ 2020년 확보예산으로 타사업 병행사업지구 우선시행

·주천 용궁, 신촌동 : 상수도공사와 병행시행

·향교동 KBS방송국 주변(구암마을) : 도시재생사업과 병행시행

⇒ 2020년도 확보예산으로 3개 지구 우선 시행하고 추후 예산

상황에 맞추어 잔여구간 계속시행

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2021. 12월 까지

마을하수도 설치사업

◦ 낙후된 농촌지역 주거환경개선 및 주민 하수도 복지를 위하여 분류식 오수관로 및 배수설비 설치

◦ 기존 처리장(용전)의 효율저하 및 용량부족에 따라 처리장 신, 증설

□ 개    요

사 업 명	사업기간	총사업비	사업량
계		12,111백만원 (국 8,477 시 3,634)	하수관로 L=15.7km 처리시설 2개소
용전지구 마을하수도 설치사업	2016 ~ 2020	8,802백만원 (국 6,161 시 2,641)	하수관로 L=11.4km 처리시설 Q=200㎥/일
서도지구 마을하수도 설치사업	2017 ~ 2020	3,309백만원 (국 2,316 시 993)	하수관로 L=4.3km 처리시설 Q=100㎥/일

□ 추진실적

<용전지구>

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                    : 2018. 05.

◦ 관로공사 착공(공정율 : 80%)                   : 2018. 06.

◦ 처리장공사 착공(공정율 : 15%)                 : 2019. 11.

<서도지구>

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                    : 2018. 12.

◦ 관로공사 착공(공정율 : 60%)                   : 2019. 03.

◦ 처리장공사 착공(공정율 : 15%)                 : 2019. 11.

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료	: 2020. 12월 까지

남원공공하수처리시설 개선 및 운영관리

◦ 하수·분뇨 및 음식물류 폐기물 병합처리로 노후시설 개선을 통해 깨끗한 환경제공 및 방류수질 법적기준 준수

◦ 위생적이고 안정적인 수질관리로 하천수질오염 방지에 기여 하고자 함

□ 개    요

◦ 시 설 명 : 남원 공공하수처리시설

◦ 시설용량 : 50,000톤/일(※처리공법 : Symbio)

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.(연중)

◦ 총사업비 : 896백만원(시비)

◦ 사업내용

- 남원공공하수처리시설 주요 시설 개선 및 운영

- 수질분석실 총유기탄소(TOC) 분석기 구입

□ 추진실적

◦ 원심탈수기 설치공사                             : 2020. 01. ~ 05.

◦ 노후 제어반(최초침전지등 2개소) 교체공사         : 2020. 02. ~ 04.

◦ 음식물 미쇄파쇄기 협잡물 이송장치 공사          : 2020. 03. ~

◦ 현장제어반(유입동등 4개소) 제작설치              : 2020. 04. ~

◦ 수질분석실 총유기탄소(TOC) 분석기 조달계약 의뢰 : 2020. 04. ~

□ 금후계획

◦ 원심농축기 수선 공사                            : 2020. 05.

◦ 유량계(7개소) 설치공사                           : 2020. 05.

요천생태습지공원 사랑받는 공원 조성

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

◦ 총사업비 : 287백만원

◦ 사업내용 : 수목식재 및 모정설치 등 방문객 친화형 공원 운영

□ 추진실적

◦ 생태습지공원 사후 모니터링 용역(10백만원)	: 2020. 01. ~

◦ 쉼터조성 및 식재공사 실시설계용역 완료(10백만원)	: 2020. 03.

◦ 애견놀이터 개장시간 조정	: 2020. 03. ~

※ 3월~10월 기간제 추가채용 및 연장운영(06:00 ~ 21:00)

◦ 야구장 바닥 흙 보충공사 완료(10백만원)	: 2020. 04.

◦ 수목 식재 공사 완료(82백만원)	: 2020. 04.

- 고사목 제거 및 백합나무 60주 식재

◦ 쉼터조성공사 완료	: 2020. 04.

- 모정 2개소 및 그네벤치 2개소 설치

◦ 예초, 제초 및 전정 작업(62백만원)	: 2020. 04. ~

□ 금후계획

◦ 회랑(덩쿨식물) 설치공사(45백만원)	: 2020. 06.

소규모 마을하수처리시설 미세목 자동스크린 설치

□ 개    요

◦ 위    치 : 주천면 고촌처리시설, 운봉읍 장교․매요처리시설

◦ 사 업 명 : 세목스크린 제작, 구매 설치공사

◦ 사업기간 : 2020. 04. 22. ~ 2020. 07. 22.

◦ 총사업비 : 금91,779천원

◦ 사업규모 : 세목스크린 1개소, 드럼 스크린 2개소

◦ 사업내용 : 세목스크린 및 드럼스크린 신규 제작 설치

□ 추진실적

◦ 실시설계 실시                                       : 2020. 02.

◦ 업체 선정 및 스크린 설치 착수                       : 2020. 04. 22.

□ 금후계획

◦ 제작 설치 및 시운전                                 : 2020. 07. 22.

□ 기대효과

◦ 협잡물 분리선별을 통한 수질개선 및 법적 방류수질 준수

◦ 유입하수 내 슬러지를 사전 선별하여 운영효율성 증대

운봉·인월 및 소규모 하수처리시설 관리대행 실시

□ 개    요

◦ 대    상 : 공공하수도시설 114개소

‣ 운봉․인월, 소규모 하수처리시설 63개소 및 중계펌프장 51개소

◦ 대 행 비 : 1,629,600천원/년(인건비, 경상수선비, 안전점검비, 약품비 등)

◦ 대행기간 : 2020. 01. ~ 2022. 12.(3년)

◦ 근거법령 : 하수도법 19조의 2(공공하수도 관리대행업 등)

◦ 대행내용 : 방류수질 준수 및 시설물, 기계, 전기설비 유지 관리업무

□ 추진실적

◦ 관리대행 협약서 작성	: 2020. 01. 01.

◦ 시설물 인계․인수서 작성	: 2020. 01. 01.

◦ 관리대행비 집행(금504,274천원)       : 2020. 01. 01. ~ 2020. 04. 30.

□ 금후계획

◦ 관리대행 성과평가 실시(1년마다)    : 2020. 12.

□ 기대효과

◦ 관리대행 시행으로 처리시설 유지관리의 효율화 및 방류 수질기준 준수

소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

처리장명	사업기간	사업량	총사업비
계		3개소 전면개량	2,340백만원 (국 490, 시 1,850 )
송동면 양평	2018~2020	Q=50㎥/일	931백만원 (국 279, 시 652)
금지면 방촌	2019~2020	Q=50㎥/일	740백만원 (국 114, 시 626)
운봉읍 비전	2020~2021	Q=30㎥/일	600백만원 (국 76, 시 524)

□ 추진실적

◦ [양평] 소규모 하수처리시설 공사 착수	: 2019. 12. ~

◦ [방촌] 하수처리시설 공법 선정	: 2020. 05. 04.

◦ [방촌] 소규모 하수처리시설 기본․실시설계	: 2020. 05. ~

◦ [비전] 하수도정비 기본계획 부분변경 설계    : 2019. 12. ~ 2020. 05.

□ 주요쟁점 및 애로사항

◦ 비전 마을하수처리시설의 하수관로 연장 연결 확장 요구가 있어서 용량변경(30㎥/일→60㎥/일)에 대하여 전북지방환경청에서 경제성 검토중임

⇒ 하수도시설 용량이 증설, 확충될 수 있도록 필요성을 부각시켜 관철 노력중임

□ 금후계획

◦ [양평] 공사 준공(시운전 포함)	: 2020. 12. 30.

◦ [방촌] 인가신청 및 재원협의	: 2020. 08. ~

◦ [방촌] 공사착공	: 2020. 12. ~

◦ [비전] 소규모 하수처리시설 부분변경 신청	: 2020. 05. ~

- 소규모 마을하수 및 중계펌프 시설 -

원격감시제어 구매 및 설치

□ 개    요

◦ 대    상 : 소규모 마을하수처리시설 및 중계펌프장

◦ 사 업 비 : 448백만원

◦ 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 06.

◦ 사업내용 : 중계펌프장(36개소), 마을하수처리장(8개소) 자동제어 설치  및 남원공공하수처리시설에서 원격감시제어 시스템 구축

□ 추진실적

◦ 실시설계 및 원가심사                            : 2020. 02.

◦ 업체 계약일                                     : 2020. 03. 03.

◦ 구매 및 설치 착수                               : 2020. 03. 03.

□ 금후계획

◦ 시운전 및 준공                                   : 2020. 06. 02.

□ 기대효과

◦ 중계펌프장 고장 발생시 신속한 대처로 민원발생 최소화

◦ 시설물 운영관리의 체계화하여 안전성 및 효율화 극대화

운봉·인월 하수처리시설 총인시설 제어반 교체

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉․인월 공공하수처리시설

◦ 사 업 명 : 총인처리시설 현장제어반 제조 구매

◦ 계약금액 : 금69,891천원

◦ 사업기간 : 2020. 04. 27. ~ 2020. 05. 26.

◦ 사업내용 : 총인처리시설 모터제어반 1면, 자동제어반 2면 교체

□ 추진실적

◦ 실시설계 및 원가심사                            : 2020. 04.

◦ 업체 계약일                                     : 2020. 04. 27.

◦ 구매 및 설치 착수                               : 2020. 04. 27.

□ 금후계획

◦ 시운전 및 준공                                  : 2020. 05. 26.

□ 기대효과

◦ 총인처리시설 모터제어반 및 자동제어시스템을 교체하여 방류수질  법적기준치 준수