2020. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

관    광    과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 감성관광지 잠재력 강화

◦ 명사와 함께하는 낭만 산책

◦ 제90회 춘향제

◦ 제28회 흥부제

◦ 제2회 한여름밤 남원 막걸리 축제

◦ 2020년 소규모 축제 지원

◦ 남원관광지 민간투자사업

◦ 남원 드래곤 관광단지 조성사업

◦ 남원랜드 민간투자사업

◦ 옛다솜 이야기원 조성사업

◦ 남원 전통가 조성사업

◦ 오리정/버선밭 연계관광지화 사업

◦ 지리산 테마관광 공원 조성사업

◦ 남원관광지 주차장 조성사업

◦ 교룡산 국민관광지 활성화 사업

◦ 남원관광지 유휴시설 정비 사업

◦ 남원예촌 전통한옥체험관 관리 ․ 운영

◦ 남원예촌 기획 ․ 상설 프로그램 운영

◦ 지리산 친환경 전기열차 도입

일  반  현  황

□ 기    구

										관 광 과 장
										이 현 재
관광진흥담당					축제기획담당						관광개발담당								관광시설운영담당						친환경전기열차담당
안 동 준					양 효 상						김 종 학								정 미 옥						한 종 수
▪관광상품 개발 및 홍보 ▪관광수요 창출 마케팅 ▪관광사업체 관리 ▪관광협의회 운영					▪춘향제 추진 ▪흥부제 추진 ▪소규모 축제 지원 ▪지역축제육성 위원회 지원						▪관광종합개발계획 수립 ▪남원예촌 지구 조성 ▪함파우 유원지 조성 ▪관광(단)지 조성 ▪대표관광지 육성 ▪옛다솜 이야기원 조성								▪남원예촌 종합운영 계획 수립 ▪남원예촌 1지구 위탁․관리감독 ▪남원예촌 2지구 관광시설운영 ▪남원예촌 3지구 관광시설운영						▪지리산친환경 전기열차 사업 추진

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	17	1	4	3	4	5
현 원	17	1	7	5	0	4	임기제 2 공무직 4
증 감	-	-	3	2	△4	△1

2020년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 계획공모형 지역관광개발사업 공모 선정(문화체육관광부) : 230억원 ◦ 한국문화재재단 `20 굿GOOD 보러가자 유치 : 110백만원 ◦ `20 거리극축제 노상놀이‘조선에서 돌아온 황희정승’ : 48백만원 ◦ `20 지역주도형 청년일자리사업 청춘PD 양성 : 98백만원 ◦ 민간투자사업(모노래일, 짚와이어, 어드벤처) 유치 : 383억원

□ 관광트렌드를 반영한 감성 관광지 잠재력 강화

◦ 문화관광 자원에 대한 홍보 채널 확대

- 계절별 감성관광 TV 영상 홍보(연합뉴스TV)              : 35회 송출

- 감성관광 홍보를 위한 여행 관계자 팸투어 추진       : 1회

- 남원스토리텔링 안내판 제작                             : 10개소

- 남원 관광기념품 선정                                  : 26종

- 남원스탬프 투어 운영(온·오프라인) 추진

◦ 매력 있는 지역자원의 코스 연계를 통한 감성관광상품 발굴 및 홍보

□ 성공적인 축제 준비

◦ 코로나19 확산 예방을 위한 춘향제 연기 및 내실 있는 축제 준비 전력

- 시민과 관광객 안전을 위해 9월로 연기

◦ 제28회 흥부제 대표 콘텐츠 육성을 위한 변화 모색

- 흥부놀부 중심의 나눔과 흥의 축제 구현 및 시민 참여형 축제 추진

◦ 한여름밤 막걸리축제로 휴가철 남원 대표 관광 콘텐츠 육성

- 지역 막걸리·먹거리 홍보 및 지역경제 활성화 기여

◦ 소규모 축제 발전을 위한 토대 마련

- 축제 주관 단체 간담회, 아카데미 개최, 발전방안 등 협의 추진

□ 남원관광의 미래 인프라 구축

◦ 예촌마당, 옛다솜 이야기원, 남원전통가, 열린관광지 등 조성 사업 추진

◦ 민간투자사업 추진

- 남원관광지 내 모노레일, 짚라인, 어드벤처 등 유치

- 남원 드래곤 관광단지 조성 추진

□ 변화된 관광환경에 부합된 관광자원개발 추진

◦ 계획공모형 지역관광개발사업 공모 선정

- 230억원 확보(문화체육관광부)

◦ 광한루원 및 함파우 유원지에 국한된 관광자원개발사업

- 오리정ㆍ교룡산ㆍ이성계 장군 전승지 등 확대 추진

◦ 다양한 시대적 요구와 변화에 부합되는 관광자원개발 지속 추진

- 사람(人)이 먼저인 관광인프라 구축

□ 남원예촌의 관광거점 구축 및 권역 확장

◦ 남원예촌 전통한옥체험관 체류형 관광객 증대

- 월  별 가동률  : 2020년 2월 39% → 3월 46% (7% 증가)

- 분기별 가동률  : 2019년 1분기 48% → 2020년 1분기 48%

※ 코로나19 속에서도, 월별 가동률 호전, 전년 1분기 대비 평균 가동률 동일 유지

◦ 남원예촌 문화체험지구 콘텐츠 강화 및 관광 거점화

- 2020 신규 콘텐츠

·기획 프로그램 : 설맞이 행사(1. 24. ~ 1. 26. / 6,000여명 방문),

예루원 전시(트래블라운지, 예루원 선샤인 / 2회)

·상설 프로그램 : 담장길 色에 물들다(4~6월), 관서당 키즈카페(4~10월),

플프마켓‘꽃담장’확대 추진(민간참여기능 강화)

※ 코로나19 영향, 상설 프로그램 연기 및 축소(체험, 이벤트형 행사) 추진

□ 민간 참여주도형 프로그램 및 이벤트, 공연, 체험행사 연계 등 다채로운 프로그램 기획 운영 확대

□ 친환경 전기열차 사업 추진

◦ 지리산 친환경 전기열차 기본계획 수립 용역 완료(남원시)  : `19. 5. ~ 12.

◦ 친환경 전기열차 국가 R&D사업 내부 심의회 개최(국토부) : `20. 4. 7.

- 심의회 개최 결과 : R&D사업 추진 결정

	하반기 추진방향
◦ 지역 고유문화와 관광이 융합한 감성관광상품 홍보 및 추진 ◦ 남원의 관광자원을 활용한 안전하고 차별화된 지역축제 육성 ◦ 남원예촌 조성사업(5지구) 연 내 마무리 ◦ 민간투자사업 지속 추진(모노레일․짚라인 착공 / 드래곤 관광단지 조성) ◦ 친환경 전기열차 국가 R&D사업 착수가 결정되어, 이후 시행예정인 시험노선 지자체 공모 선정 적극 대응

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

감성관광지 잠재력 강화

□ 목    적

◦ 관광객 중심의 수용태세 구축과 서비스 제공으로 향후 재방문율 제고

◦ 남원의 인문･생태적 특성을 살린 관광 콘텐츠 개발 및 환경 조성

◦ 전통문화와 특징 있는 체험 프로그램을 연계한 감성관광 동선 발굴

□ 추진실적

◦ 사계절 감성관광 TV 영상 홍보 / 연합뉴스TV 15초 / 35회 : 2020. 4.

◦ 남원 스토리텔링 안내판 제작 설치 / 피바위 외 9개소     : 2020. 4. ~ 7.

◦ 남원 스탬프 투어(온라인, 오프라인) 운영               : 2020. 3.

◦ 남원 관광기념품 선정(26종) 및 판매 대행사 선정        : 2020. 3. ~ 5.

◦ 관광객 유치 여행업체 인센티브 지급 / 5개 업체 / 7회    : 2020. 3. ~ 5.

◦ 감성관광상품 발굴 및 시 홈페이지 콘텐츠 등재          : 2020. 3. ~

- 9개 부문 : 한옥, 공연·체험, 문학, 길, 밥상, 촬영, 레저 스포츠, 영화·드라마, 포토존

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19로 인해 마케팅 활동 및 프로그램·공연 운영 미실시

□ 생활 속 거리두기로 전환됨에 따라 순차적으로 문화관광시설 개관 및 프로그램, 행사 운영 실시

□ 금후계획

◦ 사계절 감성관광 TV 영상 홍보 / 계절별(여름, 가을, 겨울) 35회  : 2020. 7. ~

◦ 역사·문화의 재조명 자원화 활용 걷기행사                 : 2020. 9.

- 흥부대박길, 이성계 백의종군로

◦ 판매 대행사를 통한 남원 관광기념품 판매                 : 2020. 6. ~ 11.

◦ 남원 감성관광지 홍보를 위한 대외적 홍보 활동 / 4회    : 2020. 6. ~

- 관광설명회, 관광박람회, 트래블마트 등

◦ 국내관광 활성화를 위한 여행 관계자 초청 팸투어 / 5회   : 2020. 6. ~

◦ 상설공연 및 체험 프로그램 운영                      : 2020. 5. 18. ~

- 전통문화체험(100회), 신관사또 부임행차(30회), 전통혼례 체험행사(15회)

명사와 함께하는 낭만 산책

□ 개    요

◦ 기    간 : 2020. 6. ~ 11. / 분기별

※ 코로나19 확산 장기화로 잠정 중단

◦ 장    소 : 광한루원 등 주요관광지

◦ 대    상 : 외래관광객(자유여행객 및 소규모 단체)

◦ 내    용 : 지역 명사가 스토리텔러가 되어 관광객과 함께 남원의 주요 관광지 투어 운영

□ 추진실적

◦ 추진계획 수립                                     : ‘20. 3.

명 사(안)	주요내용
·이환주(남원시장)	- 남원시장과 함께하는 특별한 남원여행길
·안숙선(명창)	- 소리로 들려주는 소리이야기
·박강용(옻칠장)	- 옻칠하는 장인의 신비한 옻 이야기
·도법스님(실상사)	- 절에서 만나는 야野단壇법法석石
·김병종(화가) 등	- 생명을 그리는 화가를 만나다
※ 명사는 남원출신 또는 남원에 연고가 있는 분야별 저명인사 선정 협의

◦『명사와 함께하는 남원여행』자문·홍보를 위한 팸투어 실시    : ‘20. 5. 13. ~ 5. 14.

□ 금후계획

◦ 남원출신 또는 연고가 있는 분야별 저명인사 선정 협의     : ‘20. 6. ~

◦ 명사와 함께 하는 남원여행상품 홍보                  : ‘20. 6. ~

- 한국관광공사, 시 홈페이지, 여행사, SNS 등

◦ 명사와 함께하는 남원여행 상품 추진                  : ‘20. 6.

제90회 춘향제

□ 개    요

◦ 일    시 : 2020. 9. 10.(목) ~ 9. 13.(일) / 4일간

◦ 장    소 : 광한루원 일원

◦ 내    용 : 전통과 현대가 만나 함께 즐기는 공연·체험 축제

◦ 주 제 어 : 춘향, 사랑을 고(90th)하다

- 지나온 90년을 기념하고 100년을 향해 나아가는 사랑이 가득한 춘향제

□ 추진방향

◦ 안전하고 질서 있는 축제

- 축제장 방역 철저 및 마스크 착용 권장

- 안전사고 예방 위한 사전점검 및 축제시설 관리 철저

◦ 관람 편의 시설 확충

- 전 무대 관람석 지붕 설치 : 차광 및 우천 대비

◦ 다양한 장르의 몰입도 높은 공연 강화

- 수준 높은 전통 공연으로 정체성 확립

- 대중과 호흡하는 젊은 공연 강화

◦ 행정중심 탈피 관광객 중심 부스 재배치

- 관광객 중심 콘텐츠 배치 및 관리부스 이동 재배치

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19 전염 대비 안전대책 강화

- 실내행사 축소, 실외행사 관객 간 거리 유지

- 축제장 방역 철저 및 마스크 착용 권장

□ 금후계획

◦ 대표브랜드공연 제작발표회                 : ‘20. 7월중

◦ 추진상황보고회                            : ‘20. 7월초(1차), 8월중(2차)

◦ 종합안전점검 및 현장보고회                : ‘20. 9. 9.

제28회 흥부제

□ 개    요

◦ 일    시 : 2020. 10. 8.(목) ~ 10. 11.(일) / 4일간

◦ 장    소 : 사랑의광장 일원

◦ 주    제 : 흥부놀부와 함께하는 흥겨운 나눔 잔치

□ 추진방향

◦ 남원시 대표 문화관광축제 콘텐츠 육성

- 나눔과 흥(興)을 테마로 타 축제와 차별화된 콘텐츠 부각

- 재미(흥)와 의미(나눔)를 함께 추구하는 색다른 축제

◦ 흥부정신을 계승한『나눔』축제

- 나 눔 장 터 : 시민, 학생, 관광객, 기부단체의 나눔 참여마당

- 나눔콘서트 : 기부연예인, 유명가수 초청 나눔문화 확산 콘서트

- 유명 기부단체 참여를 통한 전국 축제 홍보 유도

◦ 흥부자(興富子) 콘셉트를 활용한『흥(興)』축제

- 흥부놀부 소재 프로그램 강화

·흥부놀부재판 경연대회, 흥부가왕, 흥부마당극, 흥부마을 놀이패 등

- 관광객에게 남원과 흥부의 문학적, 지리적 연관성 홍보

·춘향전과 더불어 남원 대표 캐릭터 육성

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19 전염 대비 안전대책 강화

- 손소독제 비치 및 방역관리 철저                : 보건소 협조

- 대형 공연 시 좌석제 등을 통해 사람 간 밀착 방지 대책 마련

□ 금후계획

◦ 흥부제 기본계획 수립	: ‘20. 7.

◦ 흥부제 추진상황보고회	: ‘20. 8.

◦ 종합안전점검 및 현장보고회                       : ‘20. 10. 7.

제2회 한여름밤 남원 막걸리 축제

□ 개    요

◦ 일    시 : 2020. 7. 31.(금) ~ 8. 2.(일) / 3일간

◦ 장    소 : 요천 둔치

◦ 주    제 : 지역 막걸리와 함께하는 한여름밤 흥겨운 축제

◦ 내    용 : 막걸리 퍼포먼스, 막걸리·안주 시식, 대중공연 등

□ 추진방향

◦ 휴가철 집중되는 방문객을 위한 야간 관광프로그램 운영

- 여름 휴가철 관광객 즐길거리 제공

◦ 시민화합 한마당 축제

- 시민이 참여하고 즐기는 축제로 구성

◦ 지역경제 활성화 기여 축제

- 지역생산품 판매로 홍보 및 소비 촉진에 기여

- 휴가철 지역민의 유출 방지 및 지역 내 소비 유도

□ 쟁점 및 대책

◦ 혹서기 개최에 따른 무더위 및 기타 안전 확보

- 야간운영(19시~23시), 충분한 얼음생수 및 냉식혜 준비

- 응급상황 대비 철저 : 안전사고 대비 안전요원 배치 및 응급차 대기

◦ 코로나19 전염병 대비 안전대책 강화

- 방역 철저, 소독제 비치, 행사 참여자 사전 건강상태 체크

□ 금후계획

◦ 남원 막걸리 축제 기본계획 수립	: ‘20. 6.

◦ 종합안전점검 및 현장보고회	: ‘20. 7. 30.

2020년 소규모 축제 지원

□ 개    요

◦ 바래봉 눈꽃축제(‘19. 12. 29. ~ ‘20. 2. 9.)	: 20백만원 / 운봉읍애향회

◦ 고로쇠 약수제(‘20. 3. 6.)	: 15백만원 / 산내면발전협의회

◦ 바래봉 철쭉제(취소)	: 15백만원 / 운봉읍애향회

◦ 봉화산 철쭉제(취소)	: 10백만원 / 흥부골아영발전협의회

◦ 지리산 단풍축제(‘20. 10월중)         : 10백만원 / 산내면발전협의회

□ 추진방향

◦ 지역민 주체의 축제 개발 및 운영 효율성 향상

- 추진위원회 간담회 : 의견수렴 및 발전 필요성 논의

- 아카데미 운영 : 기획, 예산, 홍보, 성공 사례, 위원회 기능 등 교육

- 워크숍 실시 : 추진위원회별 발전 방안 논의

◦ 축제 효율성 제고 및 발전방안 추구

- 친환경전기열차와 연계한 발전방안 제안

- 축제 모니터링 또는 축제 자료 분석

- 지역축제육성위원회 평가 및 개선사항 도출

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19로 인해 축제 개최 불투명

- 코로나19 추이에 따라 축제 개최 여부 결정

- 축제 미개최 시 축제발전을 위한 준비 기간으로 활용

□ 금후계획

◦ 소규모축제 발전방안 용역 추진

- 추진위원회 간담회 및 아카데미                  : ‘20. 6. ~ 7.

- 연구용역 보고회                                : ‘20. 12월중

◦ 지역축제육성위원회                              : ‘20. 12월중

남원관광지 민간투자사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 일원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년

◦ 사 업 비 : 38,300백만원(민간투자38,300)

◦ 사업내용 : 모노레일 설치(L=2.3㎞), 각종 부대시설 설치 등

◦ 사업계획

- 모노레일(8인승, 15대, 총연장 2.16km) / 짚와이어(총연장1.24km, 짚타워 H=70m)

- 어드벤처 : 짚타워(스카이워크)

◦ 민간투자업체 : ㈜남원테마파크(더벨류컴퍼니, ㈜삼호, ㈜삼안)

□ 추진실적

◦ 남원관광지 민간개발사업 투자협약 체결          : ‘19. 6. 5.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시설계 추진          : ‘19. 6. ~ 12.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시계획 인가 신청     : ‘20. 1.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약안 의회 동의   : ‘20. 5. 8.

◦ 남원관광지 민간개발사업 실시협약 체결	: ‘20. 5월한

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 짚와이어 도착장(월매추어탕, 삼목국밥) 토지주 보상금액 상향 요구

□ 협의매수와 도시계획 시설결정(문화시설) 후 토지수용 절차 병행 추진(‘20. 6월중)

□ 추진계획

◦ 남원관광지 민간개발사업 기공식	: ‘20. 6월중

◦ 남원관광지 민간개발사업 추진                   : ‘20. 6. ~ ‘22. 4.

남원 드래곤 관광단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대산면 옥율리 산131번지 일원

◦ 총사업비 : 190,272백만원(민자100%)

◦ 사업내용 : 드래곤 관광단지 조성(A=795,133㎡)

- 가족･한옥호텔, 골프장(9홀), 워터파크, 아트뮤지엄 등

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

◦ 사업시행자 : 신한레저㈜

□ 추진실적

◦ 관광단지 지정 및 조성계획 승인(전라북도) 통보/고시(남원시)	: ‘18. 9. 3. / 9. 7.

◦ 국유지 용도폐지 및 시유지 교환 신청	: ‘18. 11.

- 국유지 8필지(건설부 구거 7, 농림축산부 구거 1), 시유지 1필지(임야)

※ 국유지 – 한국자산공사 협의 중 / 시유지 – 교환 완료(‘19. 9. 10.)

◦ 관광단지 조성사업 착공	: ‘19. 1. 2.

- 골프장･단지 내 도로･부지 토공정리(공정률 전체17%, 골프장70%)

◦ 호텔 건축 설계 착공	: ‘20. 4.

□ 쟁점 및 대책

◦ 금강마을 관광단지 진입도로 개설 반대

□ 도시계획시설(교통시설:도로) 결정 진행 중(도시과), 토지수용 및 협의매수 병행 추진

◦ 주변 마을 숙원사업 및 상생방안 요구

□ 숙원사업(구거확장, 둘레길 조성 등) 해결 및 상생방안(신한레저 수익사업 협의) 추진

□ 금후계획

◦ 호텔 건축 설계 시행(신한레저)	: `20. 4. ~

◦ 관광단지 진입도로 실시설계용역 시행 및 토지매입	: `20. 7. ~ `21. 6.

※ 설계 완료 및 공사 착공 이후 진입도로 시행 검토

남원랜드 민간투자사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 양림길 58-13 남원랜드

※ 사업 위치 변경 : 남원랜드 → 함파우 유원지

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 5,500백만원(민간투자5,500)

◦ 주요시설 : 아기동물농장, 곤충관, 파충류관, 식물원, 푸드존, 놀이시설, 카페, 휴게시설, 주차장 등

◦ 민간투자업체 : ㈜아뜨아트

□ 추진실적

◦ 남원랜드 민간개발사업 투자협약 체결                  : ‘19. 12. 6.

- 남원시↔㈜아뜨아트

◦ 남원랜드 민간개발사업 실시설계 착수                  : ‘20. 4. 16.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 남원랜드 토지주 보상금액 상향 요구 및 재감정 요구

※ 1차 감정가격 시점(‘19. 12. 30.) 1년 이후 재감정 가능

□ 남원랜드 토지매입이 지연됨에 따라 옛다솜 이야기원 인근 부지로 이전 추진(남원랜드→함파우 유원지)

□ 추진계획

민간개발사업 실시설계	▶	실무협상	▶	의회동의	▶	실시협약	▶	사업추진
‘20. 4. ~ ‘20. 9.		‘20. 9.		‘20. 9.		‘20. 10.		‘20. 10. ~ ‘21. 12.

옛다솜 이야기원 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 어현동 37-158번지 일원(80,000㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년간)

◦ 총사업비 : 174억원(국비81, 지방비93)

- 2020년 예산 : 5,752백만원(국비2,876, 시비2,876)

◦ 사업내용 : 옛다솜 이야기 정원, 사랑체험관 등

□ 추진실적

◦ 옛다솜 이야기원 기반시설 조성공사 착공	: ‘19. 7. 31.

- 총사업비 : 1,768백만원(도급1,126, 관급642) / ㈜엘케이토건

◦ 옛다솜 이야기원 조성공사 착공(1차분)	: ‘19. 11.

- 총사업비 : 6,492백만원(도급4,706, 관급1,786) / ㈜서도종합건설

◦ 옛다솜 이야기원 기반시설(전기/통신) 착공	: ‘20. 1.

◦ 옛다솜 이야기원 조성공사(전기/통신) 착공	: ‘20. 1.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 실시계획 인가에 따른 협의 결과, 소규모환경평가 대상으로 현재 소규모 환경영향평가(전북환경청) 협의 중으로 사업 지연

□ 전북환경청 협의 완료 예정(‘20. 5.)으로 상반기 중 사업 착공 가능

□ 금후계획

◦ 옛다솜 이야기원 기반시설(2차분) 시행               : ‘20. 6. ~ ‘21. 12.

◦ 옛다솜 이야기원 조성사업(2차분) 시행               : ‘20. 6. ~ ‘21. 12.

◦ 사랑체험관 건립공사 시행                         : ‘20. 12. ~ ‘22. 12.

남원 전통가 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 동문 일원

◦ 총사업비 : 8,000백만원(균특3,300, 도비1,350, 시비3,350)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2020년

◦ 사업내용 : 거리예술장터, 야간경관 조성 등

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: `18. 10. ~ `19. 5.

◦ 남원 전통가 조성사업 착수	: `19. 7. 24.

◦ 광한루원 및 관광지 야간경관 구축사업 착수	: `19. 12. 26.

◦ 토지수용 재결	: `20. 5. 1.

※ 토지수용 개시일	: `20. 6. 24.

□ 쟁점 및 대책

◦ 토지주 보상액 상향 요구로 거리예술장터 토지 보상 지연

□ 토지수용 재결(`20. 5. 1.) 완료

※ 수용 개시일(`20. 6. 24.) 이전에 협의 매수 추진

□ 금후계획

◦ 남원 전통가 조성사업 시행	: `20.  5. ~ 12.

사 업 명	사업비 (백만원)	사 업 내 용	추진사항 및 금후계획
합 계	6,600
거리예술장터	3,100	거리예술장터(A=932㎡) 조성 버스킹 무대, 푸드트럭, 프리마켓 부지 조성 등 - 로맨틱 벤치 8개소 설치 - 포토존 조형물 10개소 설치	공사 착수 : `19. 7. 24. 공사 중지 : `19. 9. 23. (※ 사 유 : 토지 미매입) 토지수용 개시 : `20. 6. 24. 공사 시행 : `20. 7. ~ `20. 12.
거리예술장터 빔프로젝터 설치	300	거리예술장터 버스킹 무대 설치를 위한 영상 및 음향설비	발주 의뢰 : `20. 6. 공사 시행 : `20. 7. ~ `20. 12.
광한루원 자동출입 시스템 구축	300	광한루원 동문 및 예촌 서문 자동출입 시스템 설치	공사 착수 : `20. 1. 3. 공사 시행 : `20. 1. ~ `20. 12.
여행트레일 설치	300	AR 여행트레일 1식 바닥 안내판 22개소 설치	발주 의뢰 : `20. 6. 공사 시행 : `20. 7. ~ `20. 12.
경관조명	2,600	광한루원~요천변~남원관광지 야간경관 조성 ※미디어 파사드 별도 발주(조달청)	공사 착수 : `19. 12. 26. 공사 시행 : `19. 12. ~ `20. 8.

오리정/버선밭 연계관광지화 사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 사매면 오리정, 버선밭 주변

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(균특이양3,500, 도비1,750, 시비1,750)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 오리정 테마공원(눈물정원, 숲놀이터, 주차장) 조성,

버선밭 및 유휴공간(몽룡이놀이터, 춘향이쉼터, 주차장 등) 조성

□ 추진실적

◦ 오리정 버선밭 연계 관광지화 기본설계 용역 착수      : `19. 11. 7.

◦ 남원 관광종합개발계획 수립                          : `19. 12.

◦ 오리정 버선밭 연계 관광지화 주민설명회(2회)          : `20. 1. / 2.

◦ 재정투자심사(전라북도) 심사 의뢰                     : `20. 4. 27.

□ 금후계획

◦ 기본설계 용역 준공                                  : `20. 5.

◦ 재정투자심사(전라북도)                               : `20. 6.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행                           : `21. 1. ~ 6.

◦ 토지매입 시행                                       : `21. 1. ~ 12.

◦ 사업 시행                                           : `21. 7. ~ `25. 12

지리산 테마관광 공원 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 산내면 대정리 873-3일원(국지도60호 인접, 장항교 인근)

◦ 사 업 비 : 400백만원(도비200, 시비200)

◦ 사업기간 : 2020년

◦ 사업내용 : 공원 조성 A=1,356㎡, 주차장, 화장실 등

□ 추진실적

◦ 지리산 테마관광 공원 실시설계용역 시행              : `20. 1. ~ 5.

◦ 지리산 테마관광 공원 주민설명회(2회)                 : `20. 3. / 5.

□ 쟁점 및 대책

◦ 지리산 관문 추진위원회에서 조형물 설치를 위하여 시설비 일부(1억원)를 민자로 변경 요청하고 있으나, 전라북도에서 불가 입장

□ 산내면 농촌 중심지 사업으로 추진

□ 금후계획

◦ 원가심사 의뢰 및 공사 발주                          : `20. 5.

◦ 사업 시행	: `20. 6. ~ `21. 4.

남원관광지 주차장 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 일원(어현동)

-  시립김병종미술관 건너편, 그린예식장 후면, 민속국악원 측･후면

◦ 사 업 비 : 2,780백만원(도비700, 특별교부세500, 시비1,580)

구 분	총 계	연도별 투자계획(백만원)
		2019	2020	2021이후
계	2,780	1,080	1,700
도 비	700		700
특별교부세	500	500
시 비	1,580	580	1,000

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

◦ 사업내용 : 주차장 확장  409면(소형357,  대형17,  장애인12,  임산부[여성]23)

□ 추진실적

◦ 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획 승인(관광지 주차장 조성)  : `19. 8. 2.

◦ 남원관광지 주차장 조성사업 실시 설계 및 착공	: `19. 5. ~ 12.

◦ 남원관광지 주차장 조성사업 시행	: `19. 12. ~ `20. 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업부지 내 1필지(어현동 305/2,221㎡) 협의 매수 불응(보상가 불만)

□ 사업 실시계획인가 및 토지수용절차 진행

□ 금후계획

◦ 남원관광지 주차장 조성사업 추진	: `19. 1. ~ `20. 12.

◦ 사업부지 내 미매입 1필지 토지수용절차 진행	: `20. 5. ~

교룡산 국민관광지 활성화 사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 교룡산 국민관광지 일원

◦ 사 업 비 : 8,000백만원(균특이양4,000, 도비2,000, 시비2,000)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 교룡산 둘레길 포켓공원, 남원 드래곤 관광단지 연계 코스 개발, 둘레길 야간조명 설치 등

□ 추진실적

◦ 남원 관광종합개발계획 수립	: `19. 12.

◦ 교룡산 국민관광지 기본계획 수립용역 착수	: `20. 4. 8.

※ 용역기간 : `20. 4. 6. ~ 7. 5. (3개월간)

◦ 재정투자심사(전라북도) 심사 의뢰	: `20. 4. 27.

□ 금후계획

◦ 교룡산 국민관광지 기본계획 수립용역 시행	: `20. 4. ~ 7.

◦ 재정투자심사(전라북도)	: `20. 6.

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: `21. 1. ~ 6.

◦ 사업 시행	: `21. 7. ~ `25. 12.

남원관광지 유휴시설 정비 사업

-계획공모형 지역관광개발사업-

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 일원

◦ 사 업 비 : 230억원(국비 100, 도비 30, 시비 100)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년

◦ 사업내용 : Moonlight Park 조성, 사랑의 종 설치, 모노레일 야간경관 조명 설치, 전기차 운행 등

□ 추진실적

◦ 남원관광지 유휴시설 기본계획 수립용역 시행	: `19. 11. ~ `20. 1.

◦ 공모사업 신청(시→도)	: `20. 1. 28.

◦ 전라북도 평가	: `20. 1. 30.

◦ 공모사업 신청(도→문체부)	: `20. 2. 6.

◦ 서면 심사 및 2차 PT 심사	: `20. 2. ~ 3.

◦ 공모사업 최종 선정	: `20. 3. 20.

※ 전국 8개소(수원, 정선, 제천, 아산, 남원, 강진, 포항, 사천)

◦ 현장 컨설팅(문광연 2, 자문위원 3)	: `20. 5. 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 문체부에서“사랑의 종 설치”에 대하여 부정적 입장임

□ 기본 계획 및 문체부 컨설팅 시“사랑의 종 설치”의 사업 타당성 마련하여 문체부 설득 노력

□ 금후계획

◦ 기본계획 수립 용역 시행 및 컨설팅	: `20. 6. ~ 12.

◦ 사업 시행	: `21. ~ `24.

남원예촌 전통한옥체험관 관리･운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한북로 17 일원 (전통한옥 체험단지 11,079㎡)

◦ 사 업 비 : 1,390백만원

◦ 수탁기간 : 2016. 7. 15. (개관) ~ 2021. 7. 14. / 5년

◦ 수 탁 자 : ㈜이랜드파크

◦ 사업내용 : 남원예촌 전통한옥 체험시설 민간위탁 관리･운영

□ 추진실적

◦ 수상실적 : 대한민국 서비스(숙박)만족대상(`20. 3.)

※ 한국관광의 별(`18.) / 전북 건축문화 대상(`18.) / 한국경제신상품브랜드대상(`19.)

◦ 운영현황

구 분	운 영 현 황 (백만원)			지역경제 소비효과(백만원)		비 고
	수입	비용	결산	소비효과	소비효과 포함결산	가동객실	이용객(명)	가동률	일반방문객(명)
‘20. 4.	255	436	-181	431	250	1,257	3,649	47%	12,013
‘19. 4.	289	429	-140	458	318	1,355	3,879	51%	12,651
전년 대비	△34	△7	△41	△27	△68	△98	△230	△4%	△638
‘19	1,128	1,345	-217	1,666	1,449	4,887	14,120	61%	48,572
‘18	941	1,276	-335	1,435	1,100	4,184	12,162	52%	33,000
‘17	863	1,198	-335	1,269	934	3,843	11,490	48%	21,250

※ 코로나19 영향으로, 전년 대비 매출 및 가동률 저조

□ 금후계획

◦‘코로나 19’극복을 위한 가동률 및 매출증대 방안 강구

- 시즌별 프로모션, 패키지상품 개발, 고객 맞춤별 마케팅 홍보, 서포터즈 모집 등

◦ 마케팅 전략

- 한국관광 100선 추진을 위한 동선 구축, 남원예촌 중심 구도심권 연계관광 구축

- 한국관광의 별, 전라북도 건축대상 등 활용 홍보마케팅 강화(온라인, 대도시권 등)

- 대한민국 한옥건축 대상 공모(`20. 8.), MICE 유치 및 주요 법인 제휴 확장

※ 온라인 부킹닷컴(3월~), KT&G, KGC 임직원 휴양소(5월~) 제휴

◦ `19 지출･세무 정산 및 원가분석                   : 상반기

◦ 회계감사                                         : 하반기

남원예촌 기획·상설 프로그램 운영

□ 개    요

◦ 기    간 : 연중

◦ 사 업 비 : 528백만원(국100,  도304,  시124)

◦ 사업내용 : 남원예촌 콘텐츠 확대 및 권역 확장을 위한 기획·상설프로그램 운영

□ 추진실적

◦ 남원예촌 브랜드 콘텐츠 확대 및 관광권역 확장

- 2020 신규 콘텐츠

·기획 프로그램 : 설맞이 행사(1. 24. ~ 1. 26. / 6,000여명 방문),

예루원 전시(트래블라운지, 예루원 선샤인 / 2회)

·상설 프로그램 : 담장길 色에 물들다(4~6월), 관서당 키즈카페(4~10월),

플프마켓‘꽃담장’확대 추진(민간참여기능 강화)

※ 코로나19 사태로, 상설프로그램 연기 및 축소

◦ 공모선정

- 한국문화재재단 `20 굿GOOD 보러가자 유치         : 110백만원(국100, 시10)

- `20 거리극축제 노상놀이‘조선에서 돌아온 황희정승    : 48백만원(도24, 시24)

- `20 지역주도형 청년일자리사업 청춘PD양성 : 98백만원(국39.2, 도9.8, 시39.2, 자9.8)

※ 청춘PD(5명) : 4명(3개 기업 연계), 1명(시 직접고용, 모집공고 중)

□ 추진계획

◦ 기획 및 상설 프로그램 운영	: 2020. 5. ~ 11.

구분	프로그램명	횟수	사업비 (백만원)	기 간	내 용
계			528
기획	남원상회	2~3회	80	7월, 10월	·경외상가 활성화 기획행사
	남원예촌데이	1회	50	10월	·예촌 전역 상가참여 기획행사(신규)
	명절행사	2회	40	1월, 10월	·전통놀이체험, 공연, 이벤트 등
상설	꽃담장	15회 이상	100	4월~11월	·플프마켓, 이벤트 공연
	조갑녀살풀이명무관	5회 이상	140	5월~10월	·기획공연･전시, 공개전수 ·「굿보러가자」연계 공연
	예 루 원	7회 이상	40	1월~12월	·기획전시 및 트래블라운지 운영
	황희초당 상설프로그램	30회 이상	68	5월~11월	·노상놀이「조선에서 돌아온 황희정승」 ·퓨전거리극「황희와 길을 걷다」
	관서당키즈카페	5회 이상	10	4월~10월	·전통키즈카페 상설운영 ·기획 교육체험행사 운영

지리산 친환경 전기열차 도입

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면･산내면 일원

◦ 사 업 량 : ①시험노선 1km  ②실용화노선 12km

◦ 사업구간 : 육모정~고기삼거리~정령치

◦ 사 업 비 : 982억(정책연구2, 기본계획5, 실용화 노선975)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2026년

1단계 정책연구 및 기본계획		2단계 시험노선 R&D 추진		3단계 실용화노선 구축
▷정책연구(국토부) 국토부/2억/‘18~’19년 ▷기본계획(남원시) 남원시/5억/‘18~’19년		▷시험노선 R&D 추진 (국토부/290억/‘20~’24년)		▷중앙투자심사 의뢰 (국토부→행안부) ▷실용화 노선 예산 확보 (975억/‘20~’26년)

□ 추진실적

◦ 친환경 전기열차 국내 도입방안 연구 용역 완료(국토부)      : `18. 12. ~ `19. 12.

◦ 지리산 친환경 전기열차 기본계획 수립 용역 완료(남원시) : `19. 5. ~ 12.

◦ 친환경 전기열차 국가 R&D사업 내부 심의회 개최(국토부) : `20. 4. 7.

- 심의회 개최 결과 : R&D사업 추진 결정

□ 금후계획

◦ 친환경 전기열차 국가 R&D사업 `21년 예산 확보(50억원)

◦ 친환경 전기열차 시험노선 지자체 공모 사업 대응