2020. 9.

2020년 주요업무 추진실적

도   시   과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2020년 주 요 업 무  결산

□ 2020년 주요업무 추진실적

◦ 2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 일몰제 시행에 따른 장기미집행시설 정비

◦ 장기미집행 도시계획시설(도로) 편입부지 매입

◦ 국립공공의료대학(원) 설립 추진 지원

◦ 도시가로망 개설 및 인도 정비 사업(총괄)

◦ 신정대로 개설공사(1·2구간)

◦ 교룡대로 개설공사(1구간)

◦ 지리산IC 진입도로 개설공사

◦ 시청로 정비공사

◦ 천왕봉로 대로 개설공사

◦ 새터 중로 개설공사

◦ 금암길 개설공사

◦ 만인로 중로 개설공사

◦ 가방뜰길 중로 개설공사

◦ 식정 관광우회도로 개설공사

◦ 운봉시가지 지중화 공사

◦ 안전한 보행환경 조성사업(보조)

◦ 광한루 주변 보행자 우선도로 조성공사

◦ 남원 도시재생사업(근린재생형)

◦ 터미널지구 도시재생 뉴딜사업

◦ 청년 문화·창업공간 조성사업

◦ 도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

◦ 도시공원 내 사유지 매입

◦ 금암공원 조성

◦ 어린이공원 새단장

◦ 향교공원 등산로 정비사업

◦ 만인공원 광장 및 교차로 개선사업

◦ 왕정공원 산림욕장 조성사업

일  반  현  황

□ 기    구

							도 시 과 장
							성 길 경
도시계획담당				도시정비담당							도시재생담당				공원담당
박 영 재				소 명 호							성 월 계				김 형 준
∘도시기본,관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정 및 인가 ∘지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리				∘도시가로망사업 사업시행 및 정비 ∘지역개발사업 ∘안전한보행 환경조성 ∘전선 지중화 사업 ∘시가지 인도 정비사업 ∘장기미집행시설 (도로)해소							∘도시재생사업 ∘도시재생뉴딜 사업 ∘노암산업단지 연결도로공사 ∘도시활력증진지역 개발사업 ∘온천업무				∘공원 녹지 기본 계 획(변경) 수립 ∘공원 조성 사업 추진 ∘물방개워터파크 운영 ∘공원용지보상 ∘공원 및 녹지 점용허가

□ 인    력

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	1	4	7	5	3
현 원	18	1	1	6	6 (휴직 1)	3	1	공무직 2
증 감	△3	-	-	2	△1	△2	△2

□ 도시관리계획

(2020. 8월 기준)                                                  (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.42 (36.7)	337.75 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2020. 8월 기준)                                                  (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.063 (0.21)	6.351 (20.72)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.06)	1.835 (5.99)	20.415 (66.61)	0.983 (3.21)
남 원	26.646 (100%)	0.063 (0.24)	5.355 (20.10)	0.016 (0.06)	0.784 (2.94)	0.020 (0.07)	1.835 (6.89)	18.573 (69.70)
운 봉	1.660 (100%)		0.505 (30.42)		0.093 (5.60)			0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.341 (100%)		0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)			1.142 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역 내 도시계획 도로

(2020. 8월 기준)                                                (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	791	9,299	553	8,522	238	777	91.6
대 로	35	2,367	23	2,090	12	277	88.3
중 로	138	3,746	106	3,466	32	280	92.5
소 로	618	3,186	424	2,966	194	220	68.6

□ 건설업체 현황

(2020. 8월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
302	492	262	447	206	391	56	56	40	45

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 보전과 개발이 조화를 이루는 도시기본계획 및 도시관리계획 수립 재정비 추진 ◦ 시민의 행복과 안전이 중심이 되는 도시가로망 정비 및 확충 ◦ 시민이 주도하고 참여하는 도시재생사업 추진 기반 마련 ◦ 더 푸르고 더 아름다운 도시공원 조성 및 관리

□ 지속발전 가능한 도시의 관리계획 수립 및 기틀 마련

◦ 남원 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비로 체계적 도시 공간구조 마련

◦ 장기미집행시설 일몰제대비 타당성조사 유예 조치

- 238개소  3.48㎢  → 126개소  2.95㎢ (△112개소 0.52㎢)

◦ 부동산종합공부시스템 DB 고도화 추진으로 토지 이용 효율성 제고

◦ 건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

□ 도시가로망 개설 및 인도정비사업 추진

◦ 지속적 도시가로망 개설 및 인도 정비 등으로 시민의 편의와 안전도모

- 사업 추진 중 13건 / L=13.3km, 798억원(대로4, 중로3, 소로3, 인도정비3)

·대로(신정대로1·2구간, 교룡대로 1구간, 지리산IC진입도로<도시·비도시>, 시청로)

·중로(새터, 금암길, 만인로)  ·소로(호치길, 금동8통, 서영환내과 옆)

·인도정비(운봉시가지, 보행자 우선도로, 용성로 안전한 보행환경)

- 보상 및 설계 중 7건 / L=4.24km, 214억원(대로1, 중로1, 소로5)

·대로(천왕봉로)     ·중로(가방뜰길)

·소로(식정관광우회도로, 황죽마을 소로, 서문3길, 서무1길, 신촌소로)

□ 성공적 도시재생사업 추진을 위한 기반 조성

◦ 터미널지구 도시재생활성화계획 고시                 : ‵20. 02. 14.

◦ 원도심지구 도시재생활성화계획 변경 고시            : ‵20. 07. 28.

◦ 청년 문화․창업공간 조성을 위한 청년추진단 콘텐츠개발 회의 추진 : 29회 19명

◦ 주민역량 강화 및 공모사업 추진 : 6팀(원도심지구 5팀, 터미널지구 1팀)

◦ 남원새로이 마을관리 사회적협동조합 설립 추진 : 발기인 6명, 창립총회(8.12)

◦ 남원시 거점재생 기본구상 수립 : 광한루원~만인공원 연계

- 5개 주요거점: 북부시장, 구.주조장, 흑돼지먹자거리, 구.미도탕, 종가

◦ 도시재생사업 추진을 위한 사업대상지 매입

- 원도심지구(6필지, 1107㎡, 건축물8동), 터미널지구(2필지, 236㎡, 건축물1동)

□ 도심속 시민 휴식 공간의 체계적 조성 및 관리

◦ 안전하고 쾌적한 시민 휴직공간인 금암공원 조성 추진

-  인도교, 데크산책로, 진입로데크, 종탑.우불목원, 북카페, 쉼터 등

◦ 도심속 시민 누구나 즐길 수 있는 쾌적한 휴식 공간 조성

- 등산로 정비(3.0km), 왕정공원 산림욕장 조성 (50,000㎡)

◦ 어린이공원(워터파크 1개소 포함) 및 노후시설물 정비 등 새단장 추진 : 8개소

◦ 어린이공원 화장실 정비 : 6개소

◦ 도시공원 일몰제 대상 우선관리지역 선정 및 사유지 매입

- 근린공원 6개소 (금암·월락·향교·왕정·신촌·노암)

2020년 주요업무 추진실적

2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

□ 개    요

◦ 사업범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

◦ 사업내용 : 도시기본계획, 도시교통계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 사 업 비 : 총 1,444백만원(2020년 : 500백만원)

□ 추진실적

◦ 착수 보고(시장님)	: ’19. 06. 24.

◦ 기초조사 및 현황분석	: ’19. 07. ~ 12.

◦ 시민참여단 운영(총 4회)	: ’19. 11. 14. ~ 12. 5.

◦ 추진상황 보고(시장님)	: ’20. 02. 28.

◦ 실과소장 간담회 추진	: ’20. 04. 17.

◦ 기본구상(안) 작성, 부분별 계획(안) 작성	: ’19. 12. ~ ’20. 8.

◦ 도시기본계획 입안 전 추진상황 보고(시장님)	: ’20. 08. 20

□ 금후계획

< 도시기본계획 수립 >

◦ 도시기본계획 입안 및 주민의견 수렴	: ’20. 09.

◦ 시의회 의견청취 및 시 도시계획위원회 자문      : ’20. 09.

◦ 전북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ’20. 12.

< 도시관리계획 재정비 >

◦ 도시관리계획 입안 및 주민의견 수렴	: ’20. 11.

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의 및 시의회 의견청취	: ’20. 12.

◦ 전북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ’21. 01. ~ 02.

◦ 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시	: ’21. 03.

구암지구 도시개발사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시 행 자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식/사업비 : 환지방식 / 331억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	60,480.0㎡ (3필지)	17,063.0㎡ (44필지)	9,440㎡ (12필지)	19,081.0㎡ (2필지)	도로,공원, 녹지,저류지 등
수용인구·세대수		2,873인 / 1,105호(2.6인/호)

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: ’17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: ’18. 04. 20.

◦ 시 의회보고	: ’18. 06. 20.

◦ 시 도시계획위원회 자문	: ’18. 08. 30.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시→전북도)	: ’18. 12. 31. ~ ’19. 05. 30.

◦ 사업시행자 지정 승인(남원시↔전북도)	: ’20. 01. 28.

◦ 실시계획 인가 신청(LH↔남원시)	: ’19. 12. ~ 현재

◦ 법원부지 매각관련 선수협약 체결(LH↔법원,검찰청)	: ’20. 06.09, 06.18

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 승인(남원시↔전북도)	: ’20. 08. 14.

※ 경미한 변경(분할측량 결과반영, 교통영향평가 심의 의견 반영)

◦ 남원 구암지구 실시계획인가 고시	: ’20. 08. 21.

□ 금후계획

◦ 환지계획인가 신청 및 환지예정지 지정(LH↔남원시)	: `20. 09. ~ 12.

◦ 문화재 조사용역 착수	: `20. 10.

◦ 공사추진(LH)	: `21. 01. ~ `22. 12.

일몰제 시행에 따른 장기미집행시설 정비

□ 장기미집행시설 개요

◦ 도시계획시설로 결정되었으나 10년 이상 집행이 되지 않은 시설

◦ 장기미집행시설 현황

- 238개소(면적 3,486,979㎡), 미집행률 : 전체면적의 8.5%

구분	개소	면적(㎡)	조치계획
계	238	3,486,979
도로	211	605,172	◦존치도로 : 118개 노선 589,237㎡ - 유지 34개, 유지변경 30개, 현황변경 54개 ◦일몰제 미적용 도로(20년미만) : 2단계 사업으로 존치 ◦폐지도로 : 93개 노선 158,985㎡
공원	9	2,665,242	◦존치공원(6개소, 2,175,7254㎡) - 실시계획인가(남원도시지역-금암,왕정,향교,월락,노암,신촌) ◦폐지공원(3개소, 132,566㎡) - 운봉근린공원, 인월근린공원, 어린이공원(용정율치공원)
학교	12	7,329	◦사유지 제척 : 미매입 사유지에 대해서는 학교에서 제척 ◦토지이용 현실화 : 지적선 경계, 불합리하게 결정된 구역계 일부 조정
기타시설	6	209,236	◦수도시설(1개소, 2,220㎡) : 사유지 폐지, 장기미집행시설 해소 ◦유원지(1개소, 182,184㎡) : 실시계획인가 / 토지매입 ◦자동차정류장(1개소, 13,469㎡) : 재정비 폐지 ◦운동장(1개소, 11,363㎡) : 실시계획인가 / 토지매입 ◦녹지(2개소, 334㎡) : 효용성이 상실된 완충녹지 폐지

□ 추진실적

◦ 장기미집행시설 현황조사 및 계획 수립     : ‘19. 09. ~ 10.

◦ 타당성조사 및 실시계획인가 용역 추진	: ‘19. 09. ~ 20. 04.

◦ 타당성조사 검토 보고(시장님), 결과설명(의회)	: ‘19. 02. 26. / ‘20. 03. 06.

◦ 장기미집행시설타당성 조사 완료	: ‘19. 03. 10.

◦ 실시계획인가 고시(장기미집행 존치시설)	: ‘20. 06.

□ 금후계획

◦ 보상 추진	: `20. 10. ~

◦ 도시계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시	: `20. 09. ~ 12.

장기미집행 도시계획시설(도로) 편입부지 매입

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 일원

◦ 사 업 량 : 도로 118개노선 / 589천㎡

◦ 사 업 비 : 20,676백만원(시비) / 20년 예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2025년(6개년)

□ 추진실적

◦ 타당성조사 및 실시계획 인가 용역 착수	: ‘19. 09. 04.

◦ 타당성조사 검토보고(시장님)	: `20. 02. 26.

◦ 장기미집행시설 타당성조사 결과 설명(의회)	: `20. 03. 06.

◦ 도시계획시설(도로) 실시계획 인가 고시	: ‘20. 06. 26.

□ 추진계획

◦ 보상계획 열람 공고 및 통보	: ‘20. 09. ~

◦ 보상 감정평가 추진	: ‘20. 09.

◦ 편입토지 등 보상금 산정 및 협의 요청	: ‘20. 10. ~ `25. 06

국립공공의료대학(원) 설립 추진 지원

{남원 도시계획시설[공공의료대학(원)] 결정용역}

《로드경기장+체육공원 남쪽부지 일부》

(노랑색 테두리 內)

◆면적 : 64,792㎡

- 로드경기장 : 15,000㎡

- 남 쪽 부 지 : 49,792㎡

□ 개    요

◦ 용 역 명 : 남원 도시계획시설[공공의료대학(원)] 결정용역

◦ 위    치 : 남원시 고죽동 일원

◦ 과 업 량 : 도시계획시설결정 A=64,792㎡

◦ 용 역 비 : 406,600천원

◦ 용역기간 : 2018. 12. 20. ~ 전라북도 도시계획심의 완료일(16개월)

(용역중지 : 2020. 4. 8)

□ 추진실적

◦ 국립공공의료대학(원) 설립 발표	: ’18. 04. 11.

◦ 남원시 공공의료대학 TF팀 구성 운영	: ’18. 07. 10.

◦ 공공보건의료발전종합대책발표(박능후장관)	: ’18. 10. 01.

- 공공의료대학 2022년 3월까지 설립

◦ 도시계획시설 결정용역 발주계획 보고	: ’18. 10. 22.

◦ 부지 확정통보(복지부)	: ’18. 12. 14.

◦ 용역 계약 및 착수	: ’18. 12. 20.

◦ 부지내 개발행위허가 제한지역 지정 고시	: ’19. 03. 15.

◦ 대학설립 건축기본계획 수립 연구용역 완료	: ’19. 10. 30.

◦ 도시관리계획(안) 입안 작성	: ’19. 08. 26. ~ 12. 30.

◦ 대학(원) 기본안 수립(복지부)	: ’19. 10.

◦ 도시계획 시설결정(안) 확정 및 입안	: ’20. 01. 13.

◦ 도시관리계획안의 공고 및 열람(14일 이상)	: ’20. 01. 17.(14일간)

◦ 관련부서 및 유관기관 협의(남원시, 전라북도)	: ’20. 01. ~ `20. 03.

◦ 의회 의견 청취                                 : ’20. 03. 10.

◦ 남원도시계획위원회 자문	: ’20. 03. 25.

□ 금후계획

◦ 전라북도 신청 및 도 도시계획위원회 심의 　　　: `20. 09.~

◦ 남원 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시  : ’20. 10.~

도시가로망 개설 및 인도 정비 사업(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로 개설 22지구, L=18.424㎞

◦ 총사업비 : 130,441백만원 (2020년 : 24,790백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년(11개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2020	2021이후	비고
계	22지구 (L=18.42km)	130,441	51,709	24,790	53,942
대 로	5지구 (L=5.94km)	57,137	35,551	13,230	8,356
중 로	4지구 (L=2.45km)	19,600	7,930	5,600	6,070
소 로	9지구 (L=7.28km)	26,126	5,576	2,810	17,740
인도정비 등	4지구 (L=2.75km)	27,578	2,652	3,150	21,776

□ 추진실적

◦ 공사중 (15지구) : 신정대로(1,2구간), 교룡대로(1구간), 지리산IC진입도로(도시, 비도시), 시청로, 새터중로, 금암길, 만인로, 호치길, 금동8통, 서영환내과 옆, 운봉시가지, 보행자 우선도로, 안전한 보행환경

◦ 설계중  (6지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로, 황죽마을 소로, 서문3길, 서무1길, 신촌소로

◦ 보상중  (1지구) : 가방뜰길

□ 금후계획

◦ 완공대상 (8지구 L=4.75㎞)	: 신정대로(1구간), 지리산IC진입도로(도시), 시청로, 새터중로, 금동8통, 서영환내과 옆, 운봉시가지, 보행자우선도로

◦ 계속시행  (7지구 L=8.55㎞)	: 교룡대로(1구간), 신정대로(2구간), 지리산IC진입도로(비도시), 금암길, 만인로, 호치길, 안전한 보행환경

◦ 보상  및  설계 (7지구 L=4.17㎞)	: 천왕봉로 대로, 가방뜰길 중로, 식정우회도로, 황죽마을 소로, 서문3길 소로, 서무1길 소로, 신촌소로

2020년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

(단위:백만원)

구분	사업명	위치	사업량	총사업비	‘18년 까지	‘19년	‘20년	‘21년이후 (국비)	‘20년 추진계획	비고 (사업기간)
계			22개지구 L=18,424m	130,441	37,117	14,592	24,790	53,942
					(250)	(2,151)	(2,143)	(4,869)
대로	소계		5개지구 L=5,936m	57,137	28,985	6,566	13,230	8,356
	신정대로	신정 금동	L=1,500m B=25m	18,000	10,300	1,000	4,000	2,700	공 사 중	‘18~’21
	교룡대로	향교왕정	L=1,300m B=25~35m	19,250	14,250	2,101	1,443	1,456	공 사 중	‘17~’21
					(250)	(2,101)	(1,443)	(206)
	지리산IC진입도로	아영 인월	L=2,000m B=25m	12,000	4,400	1,000	4,100	2,500	공 사 중	‘17~’21
	시청로정비	도통	L=750m	6,087	35	2,465	3,587	-	공사완료	‘18~’20
	천왕봉로	인월	L=386m B=25m	1,800	-	-	100	1,700	실시설계	‘20~’21
중로	소계		4개지구 L=2,456m	19,600	4,400	3,530	5,600	6,070
	새터중로	조산 신정	L=400m B=20m	6,800	3,900	500	2,200	200	공사완료	‘17~’20
	금암길중로	노암	L=750m B=15m	7,000	300	2,500	1,000	3,200	공 사 중 토지보상	‘18~’21
	만인로중로	향교 용정	L=1,100m B=20m	4,000	200	500	1,600	1,700	공 사 중 토지보상	‘18~’21
	가방뜰길 중로	금동	L=206m B=20m	1,800	-	30	800	970	실시설계 토지보상	‘19~’21
소로	소계		9개지구 L=7,283m	26,126	1,630	3,946	2,810	17,740
	호치길도로정비	광치	L=2,800m B=8~10m	4,800	1,100	1,000	900	1,800	공 사 중	‘18~’21
	금동8통소로	조산	L=165m B=6m	626	500	126	-	-	공사완료	‘18~’20
	서영환내과	동충	L=288m B=4~6m	2,600	30	2,570	-	-	공사완료	‘18~’20
	식정관광 우회도로	식정	L=2,590m B=10m	12,000	-	200	850	10,950	실시설계	‘19~’27
							(250)	(4,363)
	황죽마을 소로	고죽	L=398m B=10m	1,800	-	-	30	1,770	실시설계 토지보상	‘20~’21
	서문 3길 소로	왕정	L=142m B=6m	1,500	-	30	100	1,370	실시설계 토지보상	‘20~’21
	서무 1길 소로	인월	L=200m B=8m	1,500	-	20	600	880	실시설계 토지보상	‘20~’21
	신촌 소로	신촌	L=200m B=6m	1,000	-	-	30	970	실시설계 토지보상	‘20~’21
	중소도로 유지관리사업	관내	L=500m	300	-	-	300	-	공사시행	‘20
인도정비 등	소계		4개지구 L=2,749m	27,578	2,102	550	3,150	21,776
	운봉시가지	운봉	L=730m B=2.0m	2,502	2,102	400			공사완료	‘18~’20
	안전한보행 환경조성(보조)	쌍교 도통	L=1,400m	4,000	-	150	1,750	2,100	공사시행	‘19~’21
						(50)	(250)	(300)
	광한루주변 보행자 우선도로	쌍교	L=619m	400	-	-	400	-	공사완료	‘20
							(200)
	장기미집행 도로 해소 보상	관내	63개 노선	20,676	-	-	1,000	19,676	토지보상	‘20~’25

※ ‘19년 이월액 : 9,112백만원(명시: 1,223백만원, 사고: 7,889백만원)

신정대로 개설공사(1구간)

남원역

금동아파트

⇦ 순창

17

만복사지

(중로1-2)

L=0.15km, B=20m

(소로2-138)

L=0.15km, B=8m

1구간

L=900m, B=25m

(대로1-7)

L=1.5km, B=25~35m

광치천

2구간

L=600m, B=25m

교량 1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 신정교차로 ~ 딩동댕 어린이집 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.9km, B=25.0m

◦ 사 업 비 : 7,500백만원(공사비 4,500, 보상비 3,000) / 20년 예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년 / 공정 : 80%

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역	: ’17. 10. ~ ’18. 04.

◦ 1차분 공사 완료	: ’19. 12. 24.

◦ 2차분 시행	: ’20. 02. 28. ~

- 기존도로 철거, 상수도공, 오수공, 흙쌓기 등

□ 금후계획

◦ 2차분 추진	: ’20. 09. ~

- 표층 포설 및 중분대 이팝나무 식재, 회전교차로 설치 등

◦ 공사 완료	: ’20. 10.

신정대로 개설공사(2구간)

남원역

금동아파트

⇦ 순창

17

만복사지

(중로1-2)

L=0.15km, B=20m

(소로2-138)

L=0.15km, B=8m

1구간

L=900m, B=25m

(대로1-7)

L=1.5km, B=25~35m

광치천

2구간

L=600m, B=25m

교량 1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 딩동댕 어린이집 ~ 금동 APT 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.6km, B=25.0m / 교량 1개소(L=54m, B=25m)

◦ 사 업 비 : 10,500백만원(공사비 10,500) / 20년 예산 : 3,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 / 공정 : 66%

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역                                  : ’18. 06. ~ 12.

◦ 1차분 완료(전체분의 58%)	: ’19. 04. ~ `20. 03.

◦ 2차분 공사 시행	: ’20. 04. 03.~

- 토공, 오수공, 상수도공, 배수공 등

◦ 광치천 교량가설 완료	: ’20. 04.

□ 금후계획

◦ 2차분 공사 추진	: ’20. 08. ~ 11.

- 대로, 중로, 소로에 대한 토공, 배수공, 포장공, 부대공

◦ 공사 완공	: ’21. 05.

교룡대로 개설공사(1구간)

⇦ 북남원I.C

시 청

지적공사

신협

구 남원역

도로 개설(1구간)

L=0.8km, B=35m

도로 개설(2구간)

L=0.5km, B=25~35m

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 한국국토정보공사 ~ 신협 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.8km, B=35m

◦ 사 업 비 : 10,950백만원(국비 4,000, 시비 6,950) / 20년 예산 : 1,443백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 / 공정 : 50%

□ 추진실적

◦ 향교오거리~신협~향교APT 구간 공사 완료	: ’18. 06. 27. ~ ’19. 11.

◦ 매장문화재 발굴조사 추진(1차)	: ’19. 11. ~ `20. 5.

- 구    간 : 국토정보공사~향교동 761-2 (L=250m)

- 조사결과 : 성벽 앞으로 집터, 석렬, 담장, 적심, 우물터 등 발굴됨

※ 문화재청 협의결과 (기록보존 후 공사시행 / ’20. 5. 27)

◦ 2차(향교동 761-3~영락교회 앞) 발굴 조사중	: ’20. 03. 18. ~ 현재

- 발굴기관 : 전주문화유산연구원 ·조사면적 : 6,000㎡

□ 금후계획

◦ 공사 시행(문화재발굴조사 완료구간)	: ’20. 09.~

◦ 전체분 공사 완료	: ’21. 06.

지리산IC 진입도로 개설공사(도시계획구간)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로 개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 서무리 인월삼거리 ~ 현대주유소 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확·포장 L=0.9km, B=20m

◦ 사 업 비 : 5,800백만원(공사비 5,000, 보상비 800) / 20년 예산 : 1,500백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년 / 공정 : 90%

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역(도시계획구간)	: ’17. 11. ~ ’18. 06.

◦ 1차분 공사 완료	: ’18. 06.  ~ ’19. 12.

◦ 2차분 공사 시행	: ’20. 03. 02.~

- 아스콘 포장, 교통안전시설공, 회전교차로 설치, 인도설치, 중분대 설치, 가로수 식재 등

□ 금후계획

◦ 2차분 공사 추진	: ’20. 09. ~

- 보행자용 난간설치, 회전교차로 꽃잔디 식재 등

◦ 도시계획구간 준공	: ’20. 10.

지리산IC 진입도로 개설공사(비도시계획구간)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로 개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 서무리(현대주유소) ~ 아영면 인풍리(지리산IC) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확·포장 L=1.1km, B=20m

◦ 사 업 비 : 6,200백만원(공사비 5,400, 보상비 800) / 20년 예산 : 2,600백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 / 공정 : 25%

□ 추진실적

◦ 비도시지역 실시설계 추진	: ’19. 01. ~ 10.

◦ 1차분 공사 착공	: ’19. 12. 31.~

- 만남의 광장 조성, 은행나무 이식, 배수시설 설치 등

◦ 도로확장 반대에 따른 민원협의 6회 실시	: ’20. 01. ~ 05.

◦ 1차분 공사 완료	: ’20. 07.

- 토공, 만남의 광장, 기존 가로수 제거, U형 개거 등

□ 금후계획

◦ 2차분 공사 추진	: ’20. 09.~

- 토공, 배수공, 상수도공, 오수공 등

◦ 전체분 준공	: ’21. 12.

시청로 정비공사

구.남원역

남원시청

남원대교

시청로

L=750m

□ 개    요

◦ 위    치 : 시청4가 ~ 남원대교 일원

◦ 사 업 량 : 도로환경 개선 및 지중화 사업 L=750m

◦ 사 업 비 : 6,087백만원 / 20년 예산 : 3,587백만원(공사비 2,500, 대행사업비 1,087)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년 / 공정 : 40%

□ 추진실적

◦ 지중화 공사 확정(한전)	: ’19. 12. 04.

◦ 통신선로(세종텔레콤, KT 등) 협약	: ’20. 03. 09./04. 06.

◦ 1차분 공사 추진	: ’20. 04. ~

- 기존 가로수 이식 및 L형측구 철거, 빗물받이 설치

- 하수도, 도시가스 등 지하시설물 공사 병행 추진

□ 금후계획

◦ 2차분 시행	: ’20. 09.~

- 회전교차로 설치, 중분대 및 가로변 식수대 설치, 수목 식재, 도로 포장 등

- 지중화(전기, 통신) 지속 추진, 경관조명, 가로등 설치

◦ 전체분 준공	: ’20. 12.

천왕봉로 대로 개설공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 인월리 인월사거리 ~ 상우교

◦ 사 업 량 : 도로 정비 L=386m, B=25m

◦ 사 업 비 : 1,800백만원(공사비 1,300, 보상비 500) / 20년 예산 : 100백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 완료                  : ’20. 02. ~ 06.

◦ 주민설명회 실시	: ’20. 06. 10.

◦ 실시계획 인가	: ’20. 06. 26.

□ 금후계획

◦ 공사 착공 및 추진	: ’21. 01. ~ 12.

새터 중로 개설공사

보건소

휴먼시아

아파트

신정교차로

기개설(2007~2013)

L=616m, B=20m

국도24호선

도로 개설

L=400m, B=20m

메카센트럴

아파트

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 새터마을 ~ 조산동 요천로 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=400m, B=20m, 교량(새터교) L=52m, B=21m

◦ 사 업 비 : 6,800백만원(공사비 6,434, 보상비 366) / 20년 예산 : 2,400백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년 / 공정 : 77%

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진                  : ’17. 11. 22. ~ ’18. 05. 21.

◦ 1차분 시행	: ’18. 06. 27. ~ ’19. 11. 29.

◦ 2차분 착공(누계공정 75%)	: ’19. 12. 02.

◦ 교량 공사 추진	: ’20. 04. ~

□ 금후계획

◦ 2차분 준공	: ’20. 09. ~ ’20. 10.

- 교량공 상부 슬래브, 경계석 설치 등

◦ 3차분 추진 및 전체사업 준공	: ’20. 09. ~ ’20. 11.

- 포장공, 부대시설, 토취장 정비 등

금암길 개설공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 시립국악단 입구 ~ 더라우 APT 입구 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.8km, B=10m / 교량 1개소(L=43m, B=10.8m)

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(공사비 6,454, 보상비 546) / 20년 예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 / 공정 : 35%

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ’18. 10. 16. ~ ’19. 10.

◦ 용지보상 추진	: ’19. 11. ~

- 전체 13필지747.5㎡ 중 7필지 380.7㎡, 보상율 54%

◦ 1차분 공사 착공	: ’19. 12. 20.

- 교량공, 토공, 기존가옥 철거, L형옹벽 설치

◦ 국가하천(요천) 점용허가 및 실시계획 인가고시	: ’20. 05. ~

□ 추진계획

◦ 1차분 공사 계속 추진	: ’20. 09. ~ 11.

- 흙쌓기, 시점부 구조물 축조, 건물 철거 등

◦ 전체분 공사완료	: ’21. 12.

만인로 중로 개설공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 남원고 앞 회전교차로 ~ 용정교 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확·포장 L=1.11km, B=13.5m

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(공사비 3,346, 보상비 654) / 20년 예산 : 1,600백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 / 공정 : 15%

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ’18. 09. 10. ~ ’19. 03. 08.

◦ 보상 추진(보상계획 열람, 감정평가, 토지보상 등) : ’19. 04. ~

◦ 1차분 착공	: ’19. 12. 23.

◦ 2차분 착공	: ’20. 04. 02.

◦ 실시계획 인가 고시	: ’20. 06. 05.

◦ 공사 추진	: ’20. 06. ~

- 가시설 설치, 인도데크 기초설치, 석면 철거

□ 금후계획

◦ 공사추진(1,2차분)	: ’20. 09. ~ 12.

- 토공, 건축물 철거, 인도데크 및 난간 설치 등

◦ 전체분 준공	: ’21. 12.

가방뜰길 중로 개설공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 금동 휴먼시아 APT ~ 새터마을 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.26km, B=20m

※ 당 초 : L=458m, B=20m (3,400백만원)

◦ 사 업 비 : 1,800백만원(공사비 1,200, 보상비 600) / 20년 예산 : 800백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

□ 추진계획

◦ 실시설계용역 완료	: ’19. 11. 18. ~ ’20. 03. 16.

◦ 주민설명회 개최	: ’20. 02. 20.

◦ 공사 발주	: ’20. 06. 16.

◦ 실시계획 인가 고시	: ’20. 06. 26.

◦ 토지 분할	: ’20. 07. 16.

◦ 보상계획 및 열람공고	: ’20. 08. 04.

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진	: ’20. 09. ~ 12.

◦ 공사 추진	: ’20. 11. ~ `21. 12.

식정 관광우회도로 개설공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 식정동 갈치삼거리 ~ 요천교 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=2.59km, B=10m / 교량 2개소

◦ 사 업 비 : 12,000백만원(국비 4,613, 시비 7,387) / 20년 예산 : 850백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2027년 / 공정(설계용역) : 55%

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 원가심사 완료	: ’19. 11.

◦ 실시설계용역 착수	: ’20. 01. 08.

◦ 노선선정에 따른 주민설명회 실시	: ’20. 05. 12. / 05. 13.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진	: ’20. 09. ~ ’20. 10.

- 각종 제반 용역 병행 추진 : 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

◦ 도로구역 결정 및 지형도면 고시	: ’20. 10. ~ 11.

◦ 보상계획 공고 및 토지보상 협의	: ’20. 11. ~

◦ 공사추진	: ’21. 01. ~ ’27. 12.

운봉시가지 지중화 공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉3가(회전교차로) ~ 운봉4가 ~ 운봉초교 앞

◦ 사 업 량 : 전선지중화 및 인도 개설 L=730m, B=2.0m

◦ 사 업 비 : 2,502백만원(공사비 1,250, 지중화사업비 1,252)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2020년 / 공정 : 75%

□ 추진실적

◦ 지중화 사업 선정	: ’17. 10.

◦ 실시설계용역 추진	: ’18. 02. ~ 10.

◦ 통신사업자와 협약 체결	: ’18. 11. 21.

◦ 1차분 준공[운봉3가(회전교차로)~운봉4가(농협)] : ’19. 07. 17. ~ ’19. 11. 29.

◦ 2차분 한전 및 통신 지중화 완료	: ’19. 11. 14. ~ ’20. 03. 31.

◦ 도로. 인도포장 완료	: ’20. 05. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 2차분 추진	: ’20. 08. ~ ’20. 10.

- 한전주 제거 및 포장 보수, 도막형포장

◦ 공사완료	: ’20. 10.

안전한 보행환경 조성사업(보조)

□ 개    요

◦ 위    치 : 쌍교동, 죽항동, 도통동 일원

◦ 사 업 량 : 전선지중화 및 인도 개설 L=1.4㎞

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 600, 시비 3,400) / 20년 예산 : 1,750백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 / 공정 : 5%

□ 추진실적

◦ 공모사업 선정 (행안부)	: ’18. 10. 25.

◦ 기본 및 실시설계 추진(행안부 설계자문 병행 추진)	: ’19. 03. ~ 12.

◦ 전선지중화 사업 확정	: ’19. 12. 04.

◦ 지중화 협약 체결(한국전력공사)	: ’20. 02.

◦ 2구간(삽다리4가 ~ 십수정 앞) 착공	: ’20. 05.

◦ 지중화 협약 체결(KT, 공가통신)	: ’20. 06. 18. / 08. 13.

□ 금후계획

◦ 공사 시행	: ’20. 09. ~ `21. 12.

- 2구간(십수정 앞 ~ 삽다리4가) 추진	: ’20. 09. ~ `20. 11.

- 1구간(쌍교동성당~동문4가~동림4가~선원사4가) 추진	: ’21. 03. ~ `21. 11.

광한루 주변 보행자 우선도로 조성공사

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 쌍교동, 죽항동 일원

◦ 사 업 량 : 보행자 우선도로 조성 L=619m

◦ 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 시비 200) / 20년 예산 : 400백만원

◦ 사업기간 : 2020년 / 공정 : 5%

□ 추진실적

◦ 공모사업 선정 (행안부)	: ’19. 10. 10

◦ 실시설계 완료	: ’19. 12.

◦ 주민설명회 개최	: ’20. 01.

◦ 공사 착공	: ’20. 05. 08.

◦ 도시가스 공사 선행	: ’20. 07. ~ 08.

◦ 방범용 CCTV 설치에 따른 관련기관 협의	: ’20. 08. 19.

□ 금후계획

◦ 2차 주민설명회 추진 (도막형포장 무늬 관련 의견수렴)	: ’20. 09.

◦ 공사 시행	: ’20. 09. ~ 12.

- 화강석 및 도막 포장, 공사완료

남원 도시재생사업(근린재생형)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충·죽항·금동 일원(원도심 지역 : A=1.12㎢)

◦ 사업내용 : 춘몽·향단로 정비, 사랑나눔어울림센터·커먼스페이스 조성, 도시재생대학, 주민공모사업, 도시재생주민한마당 등

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2020년(6개년)

◦ 사 업 비 : 10,422백만원(균특 5,000, 도비 1,000, 시비 4,422)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	10,422	3,800	2,872	3,750
균 특	5,000	1,900	1,225	1,875
도 비	1,000	380	245	375
시 비	4,422	1,520	1,402	1,500

□ 추진실적

◦ 빨간벽돌건물 리모델링 실시설계용역 추진    : ‘20. 1. 28. ~ 4. 24.

◦ 사랑나눔 어울림센터 기본구상용역 추진      : ‘20. 2. 25. ~ 5. 20.

◦ 상반기 주민공모사업 추진(5팀)               : ‘20. 5. ~ 8.

◦ 빨간벽돌건물 리모델링 공사 착수            : ‘20. 6. 10.

◦ 활성화계획 변경 고시                       : ‘20. 7. 28.

◦ 편입토지 및 건축물 보상(6필지, 1107㎡, 건축물 8동) : ‘20. 1. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 8기 도시재생대학 운영 (8개강좌, 90명)          : ‘20. 8. ~ 11.

◦ 하반기 주민공모사업 추진(4팀)                  : ‘20. 8. ~ 11.

◦ 빨간벽돌건물 리모델링 공사 추진               : ‘20. 9. ~ 10.

◦ 활성화계획 경미한변경 추진                    : ‘20. 9. ~

◦ 사랑나눔 어울림센터 건축계획 검토 및 설계공모 : ‘20. 9. ~ 12.

◦ 춘몽․향단로 정비사업 준공 추진                 : ‘20. 12.

남원 도시재생사업(근린재생형) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비고
춘몽로 정비	보행환경 및 경관 정비 (구역사~용성사가~남문사가) L=773m. B=15m	3,100	공사 추진 (2018.12.~2020.12.)	지중화, 도시가스매설 병행추진
향단로 정비	보행환경 및 경관 정비 (구역사~법원사가~삽다리사가) L=772m. B=13m	1,200	공사 추진 (2018.12.~2020.12.)	지중화, 도시가스매설 병행추진
사랑나눔 어울림센터	꿈꾸는 문화공간 공영주차장 커뮤니티광장 등	2,877	사업대상지 매입 (16필지 1,375㎡, 건물 25동)	활성화계획 경미한변경
커먼스페이스 (Common Space)	공유하우스 마을카페 코워킹스페이스	1,980	리모델링공사 추진
도시재생 주민한마당	도시재생 성과 공유 및 홍보부스 운영 등	60	행사 추진계획 수립	10월중 시행계획
소공동체 활성화사업	주민제안 공모사업	200	주민공모사업 추진 29팀 [‘17(10), ‘18(5), ‘19(9), ‘20(5)]	하반기 4팀 선정 11월까지 완료
도시재생 모니터링	도시재생사업 성과 평가를 위한 성과지표 측정 관리	120	모니터링 용역 추진 (2018 ~ 2021)
교!용성 (주민학교)	주민역량강화 프로그램 운영 (도시재생대학)	500	도시재생대학 운영 (8회, 410명)	하반기 도시재생대학 8개 강좌 90여명 모집
주차장조성	공영주차장 조성 (16면)	320	실시설계용역 추진
마을관리 협동조합 육성	마을관리협동조합 육성 프로그램 운영	50	정관(안)작성 및 발기인모집(7명) 발기인대회 2회 창립총회 개최 (8.12.)	9월중 국토부 인가신청
주민참여 프로젝트 운영	지역거주 주민, 권역기반 전문가 등 프로젝트팀 구성	15	‘19 주민프로젝트팀 운영(11명) 도시재생한마당 장려상 수상	완료
합계		10,422

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충·죽항동 일원(시외버스터미널 주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 어울림센터·주민커뮤니티시설·상생협력상가 조성, 골목길 개선사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4개년)

◦ 사 업 비 : 14,167백만원(균특 8,500, 도비 1,417, 시비 4,250)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	14,167		3,400	3,000	7,767
균 특	8,500		2,040	1,800	4,660
도 비	1,417		340	300	777
시 비	4,250		1,020	900	2,330

□ 추진실적

◦ 어울림센터 입주대상 관련부서 회의               : ‘20.2.7. / 5.25.

◦ 활성화계획 고시                                 : ‘20. 2. 14.

◦ 터미널지구 업무대행 사업비 지급(농어촌공사)      : ‘20. 3. 4.

◦ 공공건축물 건축계획 수립용역 착수               : ‘20. 4. 3.

◦ 주민공모사업 추진(1팀 : 골목길 경관개선사업)     : ‘20. 5. ~ 7.

◦ 공공건축 사업계획 사전검토(건축도시공간연구소)          : ‘20. 6.1.~7.8.

◦ 상생협력상가 대상지 매입(2필지, 236㎡, 건축물1동) : `20. 6. 23.

◦ 골목길 경관개선 기본 및 실시설계용역 착수       : ‘20. 7. 8.

◦ 어울림센터 신축을 위한 공공건축 심의            : `20. 8. 4.

□ 금후계획

◦ 마중물사업(H/W) 설계 추진                      : ‘20. 9. ~ ‘20. 12.

- 골목길 경관개선, 숲정이 공유마당, 어울림센터, 공영주차장

◦ 하반기 주민공모사업 추진(1팀)                   : ‘20. 9. ~ ‘20. 11.

◦ 터미널지구 4기 도시재생 뉴딜아카데미 운영      : ‘20. 9. ~ ‘20. 12.

남원 도시재생 뉴딜사업 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비고
골목길 경관개선	터미널 주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	실시설계용역 추진
숲정이마을 공유마당	마을카페 마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간	2,899	사업대상지 매입 (4필지 1,163㎡, 건물 2동)	구.다솔연합 의원
남원 이음센터	중간지원조직 공간 조성	7,690	공공건축 건축계획 검토 및 심의 완료 (2020. 04. ~ 08.)
공영주차장 조성	공영주차장 조성(45면)	295	남원 이음센터 병행 추진
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성	620	대상건물 매입 완료 (2필지 236㎡, 건물 1동)
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화	850	상반기 주민공모사업 추진(1팀) 마을활동가 양성 교육(20명)	하반기 주민공모사업 1팀 선정 추진
도시재생 지원센터 운영	현장지원센터 운영	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	센터 운영비
합계		14,167

청년 문화⋅창업공간 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 죽항동 220번지 일원

◦ 사업내용 : 청년 문화⋅창업공간 조성

※ 청년 창업플랫폼, 코워킹 스페이스, 상생협력상가, 기타 기반시설 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

◦ 사 업 비 : 2,730백만원(도비 500, 시비 2,230)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	2,730		2,230	500
도 비	500		500
시 비	2,230		1,730	500

□ 추진실적

◦ 청년문화⋅창업공간 청년추진단 운영(19명, 27회)            : ‘20. 1. ~ 8.

◦ 청년 문화⋅창업공간 조성을 위한 건축도시공간연구소 컨설팅 : ‘20. 2. 19.

◦ 청년추진단 콘텐츠 개발 회의(42회)  ※ ‘20년 27회       : ‘19. 5. ~

◦ 「2020년 지역기반 정책연계 창업지원사업」공모선정  : ‘20. 4. 29.

※ 한국사회적기업진흥원 / 청년 창업지원비 25백만원

◦ 전문가(윤주선박사, 장민영박사) 추진단 컨설팅         : ‘20. 5. 28.

□ 금후계획

◦ 청년공간 조성 통합지원용역 추진              : ‘20. 9. ~ ‘21. 8.

◦ 청년 창업·문화 공간 조성 및 운영            : ‘20.09. ~ ‘21. 12.

도시활력 증진지역 개발사업(향교마을)

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 남원향교 일원

◦ 사업내용 : 커뮤니티센터 및 마을도서관 조성, 회전교차로 설치, 주민체육공원 정비, 소규모 공영주차장 조성, 골목길 정비, 안전한 통학로 조성, 주민역량강화(전통문화 프로그램 운영) 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2020년(4개년)

◦ 사 업 비 : 3,584백만원(균특 1,102, 시비 2,482)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	3,584	1,367	1,132	1,085
도 비	1,102	536	566
시 비	2,482	831	566	1,085

□ 추진실적

◦ 1차분 공사 추진                          : ‘18. 5. 9. ~ 11. 4.

- 소규모주차장(1개소) 설치, 향교~만인의총 간 인도 정비

◦ 2차분 공사 추진                          : ‘19. 2. 7. ~ 6. 26

- 회전교차로, 소규모주차장(1개소)

◦ 마무리 공사(3차분) 착공                          : ‘20. 4. 10.

- 마을안길 정비, 마을진입로 확장

◦ 사업 마무리 정산 변경 실무 협의 추진 (LH지원단)  : ‘20. 5. ~ 6.

◦ 커뮤니티센터, 주민체육공원 정비를 위한 설계 추진 : `20. 7. ~ 9.

□ 금후계획

◦ 커뮤니티센터, 주민체육공원 정비사업 추진      : ‘20. 09. ~ 12.

도시공원 내 사유지 매입

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소(금암․월락․향교․왕정․신촌․노암)

◦ 면    적 : 2,176천㎡(사유지 1,292, 국·공유지 884)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2025년(9년간)

◦ 사 업 비 : 1,600백만원(시비) / 2020년 예산 : 2,000백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	16,000	3,000	3,500	2,000	7,500
균 특	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	16,000	3,000	3,500	2,000	7,500

□ 추진실적

◦ 도시공원 부지매입 및 물건 보상 추진

- 매입공원 : 5개 공원(금암, 향교, 왕정, 월락, 노암공원)

·기보상(매입면적/매입금액) : 315,000㎡ / 6,000백만원

·2020년(매입면적/매입금액) :  97,000㎡ / 2,400백만원

◦ 장기미집행 도시계획시설(도시공원) 실시계획인가 용역 추진 : ‘19. 09. ~ ‘20. 06.

◦ 남원 장기미집행 도시계획시설(도시공원) 실시계획인가 : ‘20. 06. 26.

□ 쟁점 및 대책

◦ 장기미집행 도시공원 실시계획 인가득하여 2025년까지 일몰제 유예

- 년차적 예산확보 매입 추진

□ 금후계획

◦ 도시공원 사유지 연차적 매입 추진	: ‘20. 09. ~ ‘25. 06.

금암공원 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 사업내용 : 근린공원 조성(인도교, 산책로, 종탑·우물 복원, 북카페, 쉼터, 화장실 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년(7년간)

◦ 총사업비 : 11,500백만원(부지매입 1,000. 용역비 300. 공원조성 10,200)

- 2020년 예산 : 2,500백만원

◦ 연도별 투자계획                                    (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	11,500	1,300	2,000	2,500	5,700
균 특	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	11,500	1,300	2,000	2,500	5,700

□ 추진실적

◦ 금암공원 조성사업 추진계획 수립	: ‘19. 12. 05.

◦ 1단계 금암공원 조성사업 착수	: ‘20. 02. ~ ‘21. 12.

- 1단계 사업비 : 6,291백만원(전기 508  조경 5,783)

·전기분야 : 금수정 및 수목 경관조명, 인도교조명, 가로등설치 등

·조경분야 : 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 북카페, 쉼터, 화장실 등

※ 금수정 및 수목 경관조명 완료에 따른 시연행사 : ‘20. 06. 19.

- 추진상황 : 기존 건물철거, 종탑 복원, 데크 설치

□ 금후계획

◦ 1단계(1차분) 사업시행	: ‘20. 09. ~ 12.

◦ 금암공원 문화재 발굴조사                      : ‘20. 09. ~ 12.

◦ 금암공원 조성사업(2차분) 계약 및 사업시행	:  ‘21. 04. ~ ‘21. 12.

◦ 2단계 사업시행(관광객 유인시설)	: ‘22. 1. ~ 24. 12.

- 프러포즈 존, 장미터널, 다목적 광장, 체육시설 등

어린이공원 새단장

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 어린이공원 새단장 및 물놀이형 조합놀이대(워터파크)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년간)

◦ 사 업 비 : 2,800백만원 / 2020년 예산 : 200백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	2,800	900	1,100	200	600
새 단 장	1,200	200	200	200	600
워터파크	1,600	700	900

□ 추진실적

◦ 어린이공원 새단장 실시설계용역	: ‘19. 11. ~ 12.

◦ 어린이공원 새단장 사업시행	: ‘20. 04. ~ 07.

- 도통 5호, 향교 1호 : 탄성포장, 경계석교체, 수목정비, 퍼걸러 등

- 도통 3호, 향교 1호 : 화장실 신축, 가로등 교체

□ 금후계획

◦ 어린이공원 수목, 시설물 유지관리                  : ‘20. 09. ~ 12.

향교공원 등산로 정비사업

□ 개    요

◦ 위 치 : 남원시 향교동 산19번지 일원 ◦ 연 장 : 3.0km ◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월 ◦ 사 업 비 : 300백만원 ◦ 사업내용 : 향교공원 내 등산로 정비	왕재산 만인의총 남원고 남원중 구KBS방송국

- 등산로 길 보수(급경사지 힐링 데크산책길)

- 편백나무 숲 비가림 시설, 퍼걸러 등

- 등산로안내판 및 방향표지판, 노면 및 주변환경 정비

□ 추진실적

◦ 향교공원 등산로 정비 실시설계 용역	: ‘20. 01. ~ 02.

◦ 향교공원 고사목 제거 사업시행	: ‘20. 04. ~ 05.

◦ 향교공원 등산로 사업시행	: ‘20. 04. ~ 06.

- 데크계단, 퍼걸러, 보행매트, 안내판, 벤치 등 편의시설 설치

□ 금후계획

◦ 향교공원 등산로 주변 시설물 유지관리	: ‘20. 09. ~ 12.

만인공원 광장 및 교차로 개선사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원

◦ 사업내용 : 광장조성 및 교차로 개선사업(부지면적 6,000㎡)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2개년)

◦ 사 업 비 : 4,600백만원(용역비 200. 부지매입 2,000. 공원조성 2,400)

- 2020년 예산 : 1,200백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	4,600			1,200	3,400
균 특
도 비
시 비	4,600			1,200	3,400

□ 추진실적

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 디자인 공모	: ‘19. 03. ~ ‘20. 03.

- 공모작 10점 / 선정 6점(금·은·동 각 1점, 장려 3)

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계용역 발주계획 수립 : ‘20. 03. 30.

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계공모(1차)   : ‘20. 04. 21. ~ 08.

- 응모자 : 1개 업체(경기도 양주시)

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계공모 재공고  : ‘20. 05. 20.~ 08.20

- 응모자 : 1개 업체(경기도 양주시)

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 수행자 선정              : ‘20. 09. ~ 10.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진                     : ‘20. 10. ~ 12.

◦ 편입토지 및 지장물 보상협의 추진	: ‘20. 11. ~ 12.

◦ 사업 시행	: ‘21. 01. ~

왕정공원 산림욕장 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산37번지 일원

◦ 면    적 : 50,000㎡

◦ 사업내용 : 소나무림 복원, 산책로 및 전망대, 체육시설, 편익시설 등

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2개년)

◦ 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600, 시비 600) / 2020년 예산 : 800백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2019	2020	2021이후	비 고
계	1,200			800	400
균 특	600			400	200
도 비
시 비	600			400	200

□ 추진실적

◦ 왕정공원 산림욕장 타당성 평가	: ‘19. 10. ~ 12.

◦ 왕정공원 산림욕장 기본 및 실시설계용역	: ‘20. 03. ~ 현재

- 왕정공원 산림욕장 기본계획 중간, 최종보고  : ‘20. 07. 02 / 08. 04

□ 금후계획

◦ 실시설계 마무리, 각종 인허가 관련 용역 추진    : ‘20. 09 ~ 10

- 공원조성(변경), 문화재표본, 소규모 환경영향평가, 사전재해영향성검토 등

◦ 산림욕장 조성계획 승인 신청(전라북도)          : ‘20. 10.

◦ 도 원가심사 의뢰                              : ‘20. 10.

◦ 사업발주(총괄분) 및 1차분 계약                 : ‘20. 10.

◦ 사업착공                                      : ‘20. 11. ~