2021. 1.

2021년 주요업무 계획

도    시    과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2020년 주요업무 결산

□ 2021년 중점 추진방향

□ 2021년 주요업무 계획

◦ 도시재생 활성화 사업

◦ 왕정공원 숲속야영장 조성사업

◦ 왕정공원 등산로 정비사업

◦ 2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 도시가로망 개설 및 인도정비사업(총괄)

◦ 신정대로 개설공사(2구간)

◦ 교룡대로 개설공사(1구간)

◦ 지리산IC 진입도로 개설공사(비도시계획구간)

◦ 시청로 정비공사

◦ 천왕봉로 대로 개설공사

◦ 새터 중로 개설공사

◦ 금암길 개설공사

◦ 만인로 중로 개설공사

◦ 가방뜰길 중로 개설공사

◦ 호치길 도로 정비공사

◦ 식정 관광 우회도로 개설공사

◦ 안전한 보행환경 조성사업(보조)

◦ 남원 도시재생사업(근린재생형)

◦ 터미널지구 도새재생 뉴딜사업

◦ 청년 문화·창업공간 조성사업

◦ 통합 마스터플랜 수립 및 도시재생전략계획 변경

◦ 도시공원 내 사유지 매입

◦ 금암공원 조성

◦ 어린이공원 새단장

◦ 만인공원 광장 및 교차로 개선사업

◦ 왕정공원 산림욕장 조성사업

일  반  현  황

□ 기    구

							도 시 과 장
							성 길 경
도시계획담당				도시정비담당							도시재생담당				공원담당
박 영 재				소 명 호							성 월 계				김 형 준
∘도시기본,관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정 및 인가 ∘지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리				∘도시가로망사업 사업시행 및 정비 ∘지역개발사업 ∘안전한보행 환경조성 ∘전선 지중화 사업 ∘시가지 인도 정비사업 ∘장기미집행시설 (도로)해소							∘도시재생사업 ∘도시재생뉴딜 사업 ∘도새재생 전략 계획수립 ∘도시활력증진지역 개발사업 ∘온천업무				∘공원 녹지 기본 계 획(변경) 수립 ∘공원 조성 사업 추진 ∘물방개워터파크 운영 ∘공원용지보상 ∘왕정공원 산림 욕장 및 숲속야영장 조성사업

□ 인    력

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	1	4	7	5	3
현 원	22	1	1	6	6 (휴직 1)	3	5	공무직 2
증 감	1	-	-	2	△1	△2	2	실무수습 4

□ 도시관리계획

(2020. 12월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.42 (36.7)	337.75 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2020. 12월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.063 (0.21)	6.351 (20.72)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.06)	1.835 (5.99)	20.415 (66.61)	0.983 (3.21)
남 원	26.646 (100%)	0.063 (0.24)	5.355 (20.10)	0.016 (0.06)	0.784 (2.94)	0.020 (0.07)	1.835 (6.89)	18.573 (69.70)	-
운 봉	1.660 (100%)	-	0.505 (30.42)	-	0.093 (5.60)	-	-	0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.341 (100%)	-	0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)	-	-	1.142 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역내 도시계획 도로

(2020. 12월 기준)                                               (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	694	8,704	560	8,496	134	208	97.6
대 로	35	2,177	29	2,062	6	115	94.7
중 로	137	3,483	108	3,463	29	20	99.4
소 로	522	3,044	423	2,971	99	73	97.6

□ 건설업체 현황

(2020. 12월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
365	528	314	465	258	409	56	56	51	63

2020년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 2040년 남원 도시기본계획(안) 수립 및 장기미집행 시설 실효 ◦ 도시가로망 개설 및 인도 정비로 주민편의 증대와 안전사고 예방 ◦ 도시재생사업 추진을 위한 기반 구축 ◦ 장기미집행 공원 부지 매입 및 활발한 공원개발 사업 추진

□ 2021년 국가예산 확보  : 6개사업 / 45.04억원 (국 41.46, 도 3.58)

◦ 북남원IC~남원 원도심 연결도로 개설사업 :  2.06 (국)

◦ 용성로 안전한 보행환경 개선사업        :  3   (국)

◦ 식정마을 관광 우회도로 개설사업        :  9.9  (국)

◦ 도시재생 뉴딜사업(터미널지구)           : 25.08 (국 21.50, 도 3.58)

◦ 왕정공원 산림욕장 조성사업             :  2   (국)

◦ 왕정공원 숲속야영장 조성사업           :  3   (국)

□ 도시관리계획 변경 및 도시개발사업 추진

◦ 남원 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비로 체계적 도시 공간구조 마련

◦ 부동산종합공부시스템 DB 고도화 추진으로 토지 이용 효율성 제고

◦ 건전한 도시성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

□ 도시가로망 개설 및 안전한 보행환경 조성사업 추진

◦ 지속적 도시가로망 개설 및 인도 정비 등으로 시민의 편의와 안전 도모

·대   로 : 4개지구 / L = 5.05Km /  46,950백만원

·중   로 : 3개지구 / L = 2.25Km /  21,600백만원

·소   로 : 3개지구 / L = 2.15Km /   6,726백만원

·인도정비 : 3개지구 / L = 2.75Km /   5,302백만원

□ 도시재생을 위한 기반 구축

◦ 구.미도탕 인정사업 추진을 위한 전략계획 및 원도심 활성화계획 변경

◦ 도시재생을 위한 건축공간연구원(공공기관)과의 업무협약 추진

- 원도심 공간관리를 위한 통합 마스터플랜 수립 및 도시재생전략계획 변경

- 청년 문화ㆍ창업공간 조성 통합지원

□ 체계적인 도시공원 조성 및 관리

◦ 도시공원 일몰제 대상 사유지 매입: 98천㎡ / 25억, 100%

◦ 금암공원 조성공사 발주(45억) 및 만인공원 광장 조성 방안 마련

◦ 금암봉 금수정 해체·보수사업 완료 : 3.5억원

	아쉬운 점
◦ 시가지 일부 구간 도로개설 및 지중화 사업 민원으로 인한 공사 지연 ◦ 도시재생사업 공모 미선정 및 원도심 도시재생사업 추진 지연

2021년 중점 추진방향

시민이 안전하고 행복한

지속 가능한 도시기반 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 지속발전 가능한 도시관리계획 수립 - 보전과 개발의 조화를 위한 도시기본계획 수립 - 편리하고 체계적인 도시 공간구조 기틀 마련 ◦ 시민생활 안전 중심의 도시가로망 확충 - 시민편의 중심의 도시가로망 확충․정비 - 안전한 보행안전 조성으로 삶의 질 향상 도모 ◦ 도시재생사업을 통한 도시활성화 도모 - 도시재생을 위한 신규사업 발굴 - 전문기관과의 협업을 통한 도시재생 기반 구축 ◦안전하고 쾌적한 도심속 공원 조성 - 장기미집행 도시계획시설(공원) 사유지 매입 추진 - 만인·금암공원 조성 추진 및 어린이공원 조성 관리

2021년 주요업무 계획

도시재생 활성화 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 원도심 및 공설시장 일원

◦ 사업내용 : 청년 정주환경 조성(3개소), 구도심 거점재생(3개소)

금동(공설시장)지구 활성화지역 토지매입

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024년 (4년)

◦ 사 업 비 : 14,640백만원

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	14,640	0	0	1,500	13,140
정주환경조성	2,000	-	-	200	1,800	`21~`22
구도심거점재생	10,640	-	-	300	10,340	`21~`24
금동지구토지매입	2,000	-	-	1,000	1,000	`21~`22

□ 추진계획

◦ 정주환경 조성사업 추진                           : `21. 01. ~ 12.

◦ 구도심 거점재생사업 대상지 매입 및 공모사업 대응 : `21. ~ `23.

◦ 금동(공설시장) 지구 사업대상지 매입 및 공모 대응  : `21. 01. ~ 10.

□ 기대효과

◦ 청년문화창업공간 조성사업과 병행 청년 정주환경 조성을 통한 살자리 제공으로 청년인구 유출 방지 및 청년인구 유입 유도

◦ 구도심 내 잠재력 있는 거점(종가, 구.미도탕, 구.주조장) 매입 및 중앙부처 공모사업 대응으로 광한루원과 만인공원 연계를 통한 구도심 활성화 제고

◦ 금동 공설시장 주변 사업대상지 매입 및 도시재생사업 추진을 위한 공모 대응으로 금동지역 도시활성화 제고

왕정공원 숲속야영장 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산26번지 일원

◦ 면    적 : 30,000㎡

◦ 사업내용 : 일반야영장, 자동차야영장, 유아숲체험원, 야외공연장, 부대시설 등

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022년 (2년)

◦ 사 업 비 : 2,400백만원(국비 1,200, 시비 1,200) / 2021년 예산 : 600백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	2,400			600	1,800
균 특	1,200			300	900
도 비
시 비	1,200			300	900

□ 추진계획

◦ 왕정공원 숲속야영장 조성사업 기본계힉 및 실시설계용역 : `21. 01. ~ 06.

- 제반용역 : 문화재, 재해·환경영향, 공원조성(변경)

◦ 숲속야영장 조성계획 승인(전라북도)                : `21. 07.

◦ 원가심사(전라북도) 및 사업발주                    : `21. 08.

◦ 사업시행                                         : `21. 08 ~ `22. 12.

□ 기대효과

◦ 교룡산 왕정공원내 지역의 산림휴양 수요를 반영한 특색있는 숲속야영장을 조성       하여 지역경제 활성화 도모

◦ 왕정공원 산림욕장, 교룡산 국민관광지와 연계한 새로운 산림휴양공간 조성

왕정공원 등산로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산64번지 일원(기린봉)

◦ 연    장 : 2.0km

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12월

◦ 사 업 비 : 50백만원

◦ 사업내용 : 등산로 정비

- 노면보수, 보행매트, 목계단 보수, 배수로 정비, 방향안내판 등

□ 추진계획

◦ 등산로 정비사업 실시설계용역 추진              : `21. 01. ~ 02.

◦ 사업시행	: `21. 03. ~ 05.

□ 기대 효과

◦ 왕정공원을 찾는 시민들에게 쾌적하고 안전한 등산환경을 제공

◦ 시민 산림휴양 요구 충족과 등산객 편의 도모로 삶의 질 향상

2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업 범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업 기간 : 2019 ~ 2021년(3년)

◦ 사업 내용 : 도시기본계획, 도시교통계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 사 업 비 : 총 1,444백만원 (2021년 : 444백만원)

□ 추진실적

◦ 착수 보고(시장님)	: ‘19. 06. 24.

◦ 기초조사 및 현황분석	: ‘19. 07. ~ `19. 12.

◦ 시민참여단 운영(총 4회)	: ‘19 11. 14. ~ 12. 5.

◦ 추진상황 보고 및 간담회 개최	: ‘20. 02. 28./ 04. 17.

◦ 기본구상(안) 작성, 부분별계획(안) 작성	: `19. 12. ~ `20. 6.

◦ 도시기본계획 입안보고	: `20. 08. 20.

◦ 남원시의회 보고	: `20. 10. 22.

◦ 국토계획 평가협의회 개최	: `20. 12. 08.

□ 금후 계획

< 도시기본계획 수립>

◦ 관계기관 협의, 주민의견 수렴(공청회) 및 시의회 의견청취	: ‘20. 12. ~ `21. 02.

◦ 시 도시계획위원회 자문	: ‘21. 03.

◦ 전북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: `21. 04.

< 도시관리계획 재정비>

◦ 도시관리계획(용도지역,용도지구,시설) 정비(안) 작성	: `20. 07. ~ ‘21. 01

◦ 2040 도시기본계획 검토 반영	: `20. 12. ~ `21. 04.

◦ 도시관리계획 입안 절차 진행	: `21. 05.

◦ 관계기관 협의, 주민의견 수렴 및 시의회 의견청취	: ‘21. 05. ~ 06.

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의	: ‘21. 07.

◦ 전북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘21. 08. ~ 09.

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위  치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시행자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 331억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	60,480.0㎡ (3필지)	17,063.0㎡ (42필지)	9,440㎡ (12필지)	19,081.0㎡ (2필지)	도로,공원, 녹지,저류지 등
수용인구·세대수		2,873인 / 1,105호(2.6인/호)

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: ‘17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: ‘18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: `18. 12. 31. ~ ‘19. 05. 30.

◦ 사업시행자 지정 승인(남원시↔전북도)	: `20. 01. 28.

◦ 법원부지 매각관련 선수협약 체결(LH↔법원,검찰청)	: `20. 06.09, 6.18

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도)	: `20. 08. 14.

※ 경미한 변경(분할측량 결과반영, 교통영향평가 심의 의견 반영)

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 08. 21.

◦ 환지계획 관련 토지평가위원회 개최(2회)              : `20. 10. 14, 12. 16

◦ 구암지구 추진상황 보고(시장님)	: `20. 11. 25.

◦ 문화재 시굴조사 착수	: ‘20. 12. 14 ~ `21. 06.

□ 추진계획

◦ 토지이용계획 변경 추진	: `20. 12. ~ `21. 06.

◦ 지장물 보상 및 철거	: `21. 02. ~ 06.

◦ 공사추진(LH)	: ‘21. 06. ~ ‘23. 03.

※ 환지 계획 수립으로 인한 토지이용계획 변경 수반시 공사착공일정 순연

도시가로망 개설 및 인도 정비 사업(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로개설 22구, L=17.9㎞

◦ 총사업비 : 126,219백만원 (21년 예산 : 15,775백만원)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2022년 (8개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2021	2021이후	비고
계	22지구 (L=17.9km)	126,219	72,366	15,775	38,078
대 로	7지구 (L=5.94km)	55,137	49,331	4,156	1,650
중 로	4지구 (L=2.51km)	19,600	13,330	3,570	2,700
소 로	8지구 (L=7.69km)	25,506	6,670	3,984	14,852
인도정비 등	3지구 (L=1.75km)	25,976	3,035	4,065	18,876

□ 추진실적

◦ 공 사 중 (14지구) : 신정대로(2구간), 교룡대로(1구간), 지리산IC진입도로(비도시), 시청로,  새터중로, 금암길, 만인로, 가방뜰길, 호치길, 서영환내과 옆,  서문3길, 서무1길, 안전한보행환경, 인월지중화

◦ 설계완료 ( 2지구) : 신촌소로, 황죽마을소로

◦ 보 상 중 ( 3지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로, 장기미집행시설

◦ 공사완료 ( 2지구) : 신정대로(1구간), 지리산IC진입도로(도시)

□ 금후계획

◦ 완공대상 (10지구 L=6.70㎞)	: 신정대로(2구간), 교룡대로(1구간), 지리산IC진입도로(비도시), 시청로, 새터중로, 금암길, 가방뜰길, 서영환내과 옆, 안전한 보행환경,  인월지중화

◦ 계속 시행  (6지구 L=5.04㎞)	: 만인로, 호치길, 서문3길, 서무1길, 신촌소로, 황죽마을소로

◦ 보상  및  설계 (3지구 L=3.34㎞)	: 천왕봉로, 식정관광우회도로, 장기미집행(48개 노선)

2021년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

(단위:백만원)

구분	사업명	위치	사업량	총사업비	‘19년 까지	‘20년	‘21년	‘21년 이후	‘21년 추진계획	비고 (사업기간)
계			22개지구 L=17,886m	126,219	48,581	23,785	15,775	38,078
					(2,401)	(1,943)	(4,369)	(500)
대로	소 계		7개지구 L=5,936m	55,137	35,551	13,780	4,156	1,650
	신정대로 [1·2 구간]	신정 금동	L=1,500m B=25m	16,000	11,300	3,700	1,000	-	공사완료	‘18~’21
	교룡대로 [1구간]	향교왕정	L=1,300m B=25~35m	19,250	16,351	1,443	1,456	-	공사완료	‘18~’21
					(2,351)	(1,443)	(206)
	지리산IC진입도로 [도시·비도시구간]	아영 인월	L=2,000m B=25m	12,000	5,400	5,000	1,600	-	공사완료	‘17~’21
	시청로	도통	L=750m	6,087	2,500	3,587	-	-	공사완료	‘18~’21
	천왕봉로	인월	L=386m B=25m	1,800	-	50	100	1,650	토지보상	‘20~’22
중로	소 계		4개지구 L=2,510m	19,600	7,930	5,400	3,570	2,700
	새터중로	조산 신정	L=400m B=20m	6,800	4,400	2,200	200	-	공사완료	‘17~’21
	금암길	노암	L=750m B=15m	7,000	2,800	1,000	1,200	2,000	공 사 중 토지보상	‘18~’21
	만인로중로	향교 용정	L=1,100m B=20m	4,000	700	1,600	1,000	700	공 사 중	‘18~’22
	가방뜰길 중로	금동	L=260m B=20m	1,800	30	600	1,170	-	공사완료	‘19~’21
소로	소 계		8개지구 L=7,690m	25,506	4,950	1,720	3,984	14,852
	호치길	광치	L=2,800m B=8~10m	4,800	2,100	900	1,000	800	공 사 중	‘18~’22
	서영환내과	동충	L=288m B=4~6m	2,600	2,600	-	-	-	공사완료	‘18~’21
	식정관광 우회도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000	200	370	998	10,432	토지보상	‘19~’27
						(250)	(3,863)	(500)
	황죽마을 소로	고죽	L=398m B=10m	1,800	-	30	-	1,770	설계완료	‘20~’22
	서문 3길 소로	왕정	L=142m B=6m	1,500	30	100	1,000	370	공사시행 토지보상	‘20~’22
	서무 1길 소로	인월	L=402m B=8m	1,500	20	300	680	500	공 사 중 토지보상	‘20~’22
	신촌 소로	신촌	L=200m B=6m	1,000	-	20	-	980	설계완료	‘20~’22
	중소도로 유지관리사업	관내	L=500m	306	-	-	306	-	공사완료	‘21
인도정비 등	소계		3개지구 L=1,750m	25,976	150	2,885	4,065	18,876
	안전한보행 환경조성(보조)	쌍교 도통	L=1,400m	4,000	150	2,050	1,800	-	공사완료	‘19~’21
					(50)	(250)	(300)
	인월1길 지중화사업	인월	L=350m	1,300	-	35	1,265	-	공사완료	‘20~’21
	장기미집행 도로 해소 보상	관내	48개 노선	20,676	-	800	1,000	18,876	토지보상	‘20~’25

신정대로 개설공사 (2구간)

(계속사업)

남원역

금동아파트

⇦ 순창

17

만복사지

(중로1-2)

L=0.15km, B=20m

(소로2-138)

L=0.15km, B=8m

개설완료[1구간]

L=900m, B=25m

(대로1-7)

L=1.5km, B=25~35m

광치천

2구간

L=600m, B=25m

교량1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 딩동댕 어린이집 ~ 금동APT 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.6km, B=25.0m, 교량 1개소(L=54m, B=25m)

◦ 총사업비 : 10,500백만원(공사비 10,500) / 21년 예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역	: ‘17. 10. ~ ’18. 04.

◦ 1차분 공사 준공                          : ‘19. 04. ~ ‘20. 03.

- 토공, 교량공, 구조물공 등

◦ 2차분 공사 준공 (전체분 80%)	: ‘20. 04. ~ ‘20. 12.

- 우수, 오수, 상수도, 포장공, 회전교차로 등

□ 추진계획

◦ 3차분 공사 착공	: ‘21. 02. ~ ‘21. 08.

- 포장공, 소로구간(토공, 우수공, 상수도공, 포장공)

◦ 전체분 공사 준공	: ‘21. 08.

교룡대로 개설공사 (1구간)

(계속사업)

⇦ 북남원I.C

시 청

지적공사

신협

구 남원역

도로개설(1구간)

L=0.8km, B=35m

개설완료 (2구간)

L=0.5km, B=25~35m

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 한국국토정보공사 ~ 신협 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.8km, B=35m

◦ 총사업비 : 10,950백만원(국비 4,000 시비 6,950) / 21년 예산 : 1,456백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년)

□ 추진실적

◦ 향교오거리~신협~향교APT 구간 공사 완료	: ‘18. 06. ~ ’19. 11.

◦ 매장문화재 발굴조사 완료 [1차, 2차]	: ‘19. 11. ~ ’20. 12.

- 구    간 : 국토정보공사~향교동 761-2 / 향교동 761-2 ~ 영락교회

- 조사결과 : 성벽 앞으로 집터, 석렬, 담장, 적심, 우물터 등 발굴됨

◦ 교룡대료 개설공사 [1구간](2차분) 공사 준공	: ‘19. 11. ~ ’20. 12.

- 토공, 배수공 등

□ 추진계획

◦ 3차분 공사 추진	: ‘20. 11. ~  ‘21. 06.

- 국토정보공사 ~ 영락교회 구간

- 우수공, 오수공, 포장공, 부대공

◦ 전체분 공사 준공	: ‘21. 08.

지리산IC 진입도로 개설공사(비도시계획구간)

(계속사업)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

개설완료

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 서무리(현대주유소)~아영면 인풍리(지리산IC) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=1.1km, B=25m

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (4년) / 공정율 30%

◦ 사 업 비 : 6,200백만원(공사비 5,400  보상비 800) / 21년 예산 : 1,600백만원

□ 추진실적

◦ 비도시지역 실시설계 추진	: ‘19. 01. ~ ‘19. 10.

◦ 1차분 공사 준공	: ‘19. 12. ~ ‘20. 07.

- 만남의 광장 조성, 은행나무 이식, 배수시설 설치 등

◦ 2차분 공사 착공	: ‘20. 09.

- 토공, 배수공, 상수도공, 오수공 등

□ 추진계획

◦ 3차분 공사 착공	: ‘20. 12. ~

- 토공, 구조물공, 배수공 등

◦ 전체분 공사 준공	: ‘21. 12.

시청로 정비공사

(계속사업)

구.남원역

남원시청

남원대교

시청로

L=750m

□ 개    요

◦ 위    치 : 시청4가~남원대교 일원

◦ 사 업 량 : 도로환경개선 및 지중화사업 L=750m

◦ 사 업 비 : 6,087백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년) / 공정율 60%

□ 추진실적

◦ 지중화 공사 협약 확정(한전)	: ‘19. 12. 04.

◦ 통신선로(세종텔레콤, KT 등) 협약	: ‘20. 03. ~ ‘20. 04.

◦ 1차분 공사 준공	: ‘20. 04. ~ ’20. 12

- 기존 가로수 이식 및 L형 측구 철거, 빗물받이 설치

- 하수도, 도시가스 등 지하시설물 공사 병행 추진

◦ 2차분 공사 착공	: ‘20.  09.

- 중분대 및 가로변 식수대 설치, 수목 식재, 도로포장 등

- 지중화(전기, 통신) 지속 추진, 경관조명, 가로등 설치

□ 추진계획

◦ 한전주 및 통신선 제거	: ‘21.  02.

◦ 공사 준공	: ‘21.  03.

천왕봉로 대로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 인월리 인월사거리 ~ 상우교

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=386m, B=25m

◦ 사 업 비 : 1,800백만원 (공사비1,300 보상비500) / 21년예산 : 100백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 완료	: ‘20. 02. ~ ‘20. 06.

◦ 주민설명회 개최	: ‘20. 06. 10.

◦ 실시계획 인가	: ‘20. 06. 26.

◦ 전북도 확포장 건의(국지도60호선)	: `20. 07. 24.

◦ 관련기관 및 실과소 협의	: `20. 07. ~ 10.

- 건설과, 교통과, 농정과, 건축과, 산림녹지과, 환경사업소, 상수도사업소, 남원경찰서 등

□ 추진계획

◦ 토지보상 추진	: ‘21. 01. ~ ‘21. 12.

새터 중로 개설공사

(계속사업)

보건소

휴먼시아

아파트

신정교차로

기개설(2007~2013)

L=616m, B=20m

국도24호선

도로개설

L=400m, B=20m

메카센트럴

아파트

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 새터마을 ~ 조산동 요천로 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=400m, B=20m, 교량(새터교) L=52m, B=21m

◦ 사 업 비 : 6,800백만원 (공사비6,434 보상비366) / 21년예산 : 200백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 추진	: ‘17. 11.  ~ ‘18. 05.

◦ 1차분 준공	: ‘18. 06.  ~ ‘19. 11.

◦ 2차분 준공 (누계공정 75%)	: ‘19. 12.  ~ ‘20. 10.

- 토공, 우·오수, 교량 하부 기초 등

◦ 교량 공사 완료	: ‘20. 04.  ~ ’20. 12.

◦ 3차분 추진	: ‘20. 06.

- 포장공, 조경공, 부대공 완료

□ 추진계획

◦ 3차분 추진 및 전체사업 준공	: ‘21. 03.

- 토취장 정비, 부대공 등

금암길 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 시립국악단 입구~더라우APT 입구 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=0.8km, B=10m, 교량1개소(L=43m, B=10.8m)

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(공사비 6,000  보상비 1,000) / 21년예산 : 1,200백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘18. 10. ~ ’19. 10.

◦ 용지보상 추진	: ‘19. 11.

- 전체 13필지 747.5㎡ 중 7필지 380.7㎡, 보상율 54%

◦ 1차분 공사 추진	: ‘19. 12. ~ ’20. 12

- 교량공, 토공, 기존가옥 철거, L형옹벽 설치

□ 추진계획

◦ 2차분 착공	: ‘21. 02.

- 시점부 켄틸레버 구조물 축조, 인도설치, 기존 건물 철거 등

◦ 전체분 준공	: ‘21. 12.

만인로 중로 개설공사

(계속사업)

사업구간

L=1.1km, B=20m

남원고

구.방송국

롯데마트

구암지구

용정교

회전교차로

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 남원고 앞 회전교차로 ~ 용정교 일원

◦ 사업내용 : 도로 확포장 L=1.1km, B=20m

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(공사비 3,346, 보상비 654) / 21년예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘18. 09. ~ ‘19. 03.

◦ 보상 추진(보상계획 열람, 감정평가, 토지보상 등)	: ‘19. 04.

◦ 1차분 완료(가옥 철거, 토공 등)	: ‘19. 12. ~ ‘20. 12.

◦ 2차분 추진(인도데크설치, 법면보강공사 등)	: ‘20. 04. ~

◦ 실시계획 인가 고시	: ‘20. 06.

□ 추진계획

◦ 2차분 완료	: ‘21. 02.

◦ 3차분 시행	: ‘21. 03. ~ 12.

- 토공, 상·하·오수공, 포장공, 부대공 등

□ 추경에 잔여사업비 700백만원 확보로 사업마무리

가방뜰길 중로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요
◦ 위    치 : 금동 휴먼시아 APT ~ 새터마을 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.26km, B=20m

◦ 사 업 비 : 1,800백만원(공사비1,200 보상비600) / 21년예산 : 1,170백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (3년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 완료	: ‘19. 11. ~ ‘20. 03.

◦ 주민설명회 개최	: ‘20. 02.

◦ 실시계획 인가 고시 및 공사 발주	: ‘20. 06.

◦ 1차분 착공	: ‘20. 07.

- 토공, PC암거 매설 등

◦ 용지보상 추진	: ‘20. 09.

□ 추진계획

◦ 용지보상 지속 추진	: ‘21. 01. ~ ‘21. 03.

◦ 1차분 준공	: ‘21. 06.

◦ 2차분 착공 및 전체분 준공	: ‘21. 07. ~ ‘21. 12.

호치길 도로 정비공사

(계속사업)

국도17

광석마을

광치산업단지

호치마을

고산마을

정비완료[1공구]

L=1.1km, B=10m

[2공구] 도로정비

L=1.70km, B=8m

□ 개    요

◦ 위    치 : 국도17호선(광치동 산업단지) ~ 광석마을 ~ 호치마을

		1공구 :	국도17호선(광치동산업단지) ~ 광석마을
		2공구 :	광석마을 ~ 호치마을

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=2.80km, B=8~10m

		1공구 :	L=1.10km, B=10m / 사업비: 607백만원
		2공구 :	L=1.70km, B= 8m / 사업비: 2,893백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

◦ 사 업 비 : 4,800백만원 (시비 3,500) / 21년예산 : 1,000백만원

□ 추진실적

1공구

◦ 실시설계용역 완료	: ‘18. 2. ~ 5.

◦ 1공구 공사 완료	: ‘18. 5. 3. ~ 10. 18.

2공구

◦ 실시설계용역 완료	: ‘18.  2. ~ 12.

◦ 주민설명회 개최	: ‘18. 11. 13.

◦ 소규모환경영향평가 용역 추진	: ‘18. 11. ~ ‘19. 5.

◦ 도로구역 결정 지형도면 고시	: ‘19.  4. 26.

◦ 1차분 공사 완료	: ‘19.  5. ~ 12. 18.

◦ 2차분 공사 완료	: ‘20.  3. ~ 11. 30.

□ 추진계획

2공구

◦ 3차분 추진	: ‘21.   3. ~ 12.

□ 추경에 잔여사업비 800백만원 확보로 사업 마무리

식정 관광 우회도로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 식정동 갈치삼거리~요천교 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=2.96km, B=10m, 교량2개소

◦ 사 업 비 : 12,000백만원(국비 4,613 시비 7,387) / 21년 예산 : 998백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2027년 (9년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘20. 01. ~ 12.

◦ 노선선정에 따른 주민설명회 실시(2회)	: ‘20. 05. 12 ~ 13.

◦ 각종 제반 용역 추진	: ‘20. 03. ~ 12.

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

□ 추진계획

◦ 도로구역 결정 및 지형도면 고시	: ‘21. 01. ~ 02.

◦ 보상계획공고 및 토지보상 협의	: ‘21. 02. ~ ’22. 12.

◦ 공사추진	: ‘22. 03. ~ ’27. 12

안전한 보행환경 조성사업(보조)

(계속사업)

전선지중화 및 인도개설

L=1.334㎞, B=1.5~2m

광한루

삽다리4가

십수정 앞

쌍교동성당

시외버스터미널

선원사4가

동림4가

동문4가

요

천

1

1

1

2

□ 개    요

◦ 위    치 : 쌍교동, 죽항동, 도통동 일원

◦ 사업내용 : 전선지중화 및 인도개설 L=1.4㎞

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(국비600 시비3,400) / 21년예산 : 1,800백만원(시비300)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (3년)

※ 공모사업선정 : 2018. 10. 25 / 행정안전부 안전개선과

□ 추진실적

◦ 공모사업선정(행안부)	: ‘18. 10. 25.

◦ 기본 및 실시설계 추진(행안부 설계자문 병행 추진)	: ‘19. 03. ~ 12.

◦ 전선지중화 사업 확정	: ’19. 12. 04.

◦ 지중화 협약 체결(한국전력공사)	: ’20. 02.

◦ 2구간(삽다리4가 ~ 십수정 앞) 착공	: ’20. 05.

◦ 지중화 협약 체결(KT, 공가통신)	: ’20. 06. 18. / 08. 13.

◦ 통신 4개사 지중화 굴착 허가	: ‘20. 10. 29.

- ㈜KT, ㈜LG유플러스, SK텔레콤(주), SK브로드밴드(주)

◦ 도시가스 공사 추진	: ‘20. 06. ~ 11.

□ 추진계획

(선원사4가 ~ 동림4가 ~ 동문4가)

1구간

◦ 한전 및 통신 지중화 협약 추진	: ‘21. 01. ~ 02.

◦ 공사 발주 및 1구간 착공	: ‘21. 03.

◦ 한전 및 통신 전선지중화 추진	: ‘21. 03. ~ 07.

◦ 가로등 설치 및 신호등, CCTV 전선 지중화	: ‘21. 07. ~ 08.

◦ 아스콘 깨기 및 경계석 시공, 도로 아스콘 포장	: ‘21. 08. ~ 09.

◦ 한전 및 통신주 제거, 보도 포장	: ‘21. 09. ~ 11.

◦ 도막형 포장 및 부대시설 설치, 준공	: ‘21. 10. ~ 11.

◦ 1구간 준공	: ‘21. 11.

(삽다리4가~십수정 앞)

2구간

◦ 한전 및 통신 전선 지중화 추진	: ‘20. 12. ~ ‘21. 03.

◦ 가로등 설치 및 신호등, CCTV 전선 지중화	: ‘21. 02. ~ 04.

◦ 아스콘 깨기 및 경계석 시공, 도로 아스콘 포장	: ‘21. 04.

◦ 한전 및 통신주 제거, 보도 포장	: ‘21. 04. ~ 05.

◦ 도막형 포장 및 부대시설 설치, 준공	: ‘21. 05. ~ 06.

◦ 2구간 준공	: ‘21. 06.

남원 도시재생사업(근린재생형)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항․금동 일원(원도심 지역 : A=1.12㎢)

◦ 사업내용 : 춘몽․향단로 정비, 사랑나눔어울림센터․커먼스페이스조성, 도시재생대학, 주민 공모사업, 도시재생주민한마당 등

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2021년 (7년) ※사업기간연장(`20년 → `21년)

◦ 사 업 비 : 10,422백만원(균특 5,000, 도비 1,000, 시비 4,422)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	10,422	6,672	3,750	0	-
균 특	5,000	3,125	1,875	-	-
도 비	1,000	625	375	-	-
시 비	4,422	2,922	1,500	-	-

□ 추진실적

◦ 춘몽ㆍ향단로 정비사업 추진                    : ‘18. 12. ~ `20. 12.

◦ 편입토지 및 건축물 보상(8필지, 1,085㎡, 건축물 16동) : ‘20. 01. ~ 11.

◦ 도시재생대학 운영(2회, 127명)                  : ‘20. 01. ~ 11.

◦ 주민공모사업 추진(9팀)                         : ‘20. 05. ~ 11.

◦ 활성화계획 변경 고시                          : ‘20. 07. 28.

◦ 빨간벽돌건물 리모델링 공사 추진               : ‘20. 09. ~ 11.

◦ 주차장 조성공사 추진                          : `20. 10. ~ 12.

◦ 활성화계획 경미한변경 추진(시→국토부)         : ‘20. 11. ~ 12.

□ 추진계획

◦ 사랑나눔어울림센터 조성공사 추진                 : `21. 03. ~ 09.

◦ 주민역량강화사업(도시재생대학, 주민공모사업 등) 추진 : `21. 01. ~ 12.

남원 도시재생사업(근린재생형) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비고
춘몽로 정비	보행환경 및 경관 정비 (구역사~용성사가 ~남문사가)	3,100	공사 추진 (2018.12.~2020.12.) 남문사가~용성초사가 완료	지중화, 도시가스매설 병행추진
향단로 정비	보행환경 및 경관 정비 (구역사~법원사가 ~삽다리사가)	1,200	공사 추진 (2018.12.~2020.12.)	지중화, 도시가스매설 병행추진
사랑나눔 어울림센터	꿈꾸는 문화공간 공영주차장 커뮤니티광장 등	2,877	실시설계용역 추진
커먼스페이스 (Common Space)	공유하우스 마을카페 코워킹스페이스	1,980	사업 완료	청년들과 다양한 프로그램 진행
도시재생 주민한마당	도시재생 성과 공유 및 홍보부스 운영 등	60	주민한마당 추진(2회)
소공동체 활성화사업	주민제안 공모사업	200	주민공모사업 추진 33팀 [‘17(10), ‘18(5), ‘19(9), ‘20(9)]
도시재생 모니터링	도시재생사업 성과 평가를 위한 성과지표 측정 관리	120	모니터링 용역 추진 (2018 ~ 2021)
교!용성 (주민학교)	주민역량강화 프로그램 운영 (도시재생대학)	500	도시재생대학 운영 (9회, 459명 수료)
주차장조성	공영주차장 조성 (16면)	320	사업 완료
마을관리사회적 협동조합 육성	마을관리협동조합 육성 프로그램 운영	50	국토부 인가 신청 및 승인대기	공구대여사업 준비중
주민참여 프로젝트 운영	지역거주 주민, 권역기반 전문가 등 프로젝트팀 구성	15	‘19 주민프로젝트팀 운영(11명) 도시재생한마당 장려상 수상
합 계		10,422

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 이음센터․주민커뮤니티시설․상생협력상가 조성, 골목길 개선사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년 (4년)

◦ 사 업 비 : 14,167백만원(균특 8,500, 도비 1,417, 시비 4,250)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	14,167	3,400	3,832	3,583	3,352
균 특	8,500	2,040	2,300	2,150	2,010
도 비	1,417	340	383	358	336
시 비	4,250	1,020	1,149	1,075	1,006

□ 추진실적

◦ 이음센터 입주대상 관련부서 회의                 : ‘20.02.07./05.25.

◦ 활성화계획 고시                                 : ‘20.02.14./11.06.

◦ 터미널지구 업무대행 사업비 지급(농어촌공사)      : ‘20. 03. 04.

◦ 이음센터 조성 행정절차 추진                     : ‘20. 04. ~ 08.

◦ 주민공모사업 추진(1팀-골목길 경관개선사업)       : ‘20. 05. ~ 07.

◦ 상생협력상가 대상지 매입(2필지, 236㎡, 건축물1동) : `20. 06. 23.

◦ 이음센터 설계제안공모 공고(1팀응모-유찰)         : `20. 09. 21.

◦ 하반기 주민공모사업 추진(1팀-제일빌라골목길개선) : ‘20. 08. ~11.

◦ 골목길 경관개선 사업 착수                       : ‘20. 11. 20.

◦ 이음센터 설계제안공모 재공고                    : `20. 12. 01.

□ 추진계획

◦ 마중물사업(H/W사업) 및 주민역량강화 사업 추진 : `21. 01. ~ `22. 12.

◦ 활성화계획 변경 추진                          : `21. 06. ~ 12.

남원 도시재생 뉴딜사업 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비고
골목길 경관개선	터미널 주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	시범구간 선정 사업추진 주민협의 중	남진빌라 골목
숲정이마을 공유마당	마을카페 마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간	2,899	철거공사 완료
남원 이음센터	중간지원조직 공간 조성	7,690	설계공모 추진	1차 공모 유찰에 따른 재공모 추진
공영주차장 조성	공영주차장 조성(45면)	295	남원 이음센터 병행 추진
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성	620	안전진단 용역 추진
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화	850	주민공모사업 추진(2팀) 도시재생뉴딜아카데미운영 (4회, 80명 수료)
도시재생 지원센터 운영	현장지원센터 운영	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	센터 운영비
합계		14,167

청년 문화⋅창업공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 죽항동 220번지 일원

◦ 사업내용 : 창업플랫폼, 코워킹 스페이스,  상생협력상가 조성 및 통합지원용역 추진

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (3년)

◦ 사 업 비 : 2,835백만원(도비 500, 시비 2,335)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	2,835	2,230	500	105	0
도 비	500	500	-	-	-
시 비	2,335	1,730	500	105	-

□ 추진실적

◦ 청년추진단 콘텐츠 개발 회의(52회) ※ ‘20년 37회  : ‘19. 05. ~

◦ 편입토지 및 건축물 보상(8필지, 1,700㎡, 건축물 6동) : ‘19. 06. ~ ‘20. 09.

◦ 청년문화⋅창업공간 청년추진단 운영(19명, 37회) : ‘20. 01. ~ 11.

◦ 건축공간연구원 컨설팅(전략 및 청년공간 구성 방안 모색) : ‘20. 02. 19.

◦ 「2020년 지역기반 정책연계 창업지원사업」공모선정  : ‘20. 04. 29.

※ 한국사회적기업진흥원 / 청년 창업지원비 25백만원

◦ 전문가(윤주선박사, 장민영박사) 추진단 컨설팅   : ‘20. 05. 28.

◦ 통합지원용역 협약(건축공간연구원)              : `20. 09. 10.

◦ 청년공간 조성 통합지원용역 추진               : ‘20. 09. ~ ‘21. 08.

◦ 통합지원용역 착수보고(시장)                    : `20. 11. 05.

□ 추진계획

◦ 청년 문화ㆍ창업공간 조성                      : `21. 01. ~ 12.

- 매월1회 간담회(시, 아우리, 센터, 청년)          : `21. 01. ~ 02.

: 시설물 운영방향, 청년수요 확인, 파일럿프로그램운영 등

- 시설물 활용방안 결정                         : `21. 03.

- 시설물 리모델링 시행 및 활용, 운영관리        : `21. 03. ~ 12.

통합 마스터플랜 수립 및 도시재생전략계획 변경

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도시지역 일원

◦ 사업내용 : 남원시 통합적 관리전략 및 마스터플랜 수립, 실행방안 마련, 도시재생 신규사업 대응 도시재생 전략계획 재수립 등

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년 (2년)

◦ 사 업 비 : 432.6백만원

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
시 비	432.6	-	173.0	259.6	-

□ 추진실적

◦ 전략계획 공고                                 : ‘16. 12. 02.

◦ 전라북도 도시재생 자문단 현장 컨설팅          : ‘19. 12. 16.

◦ 건축도시공간연구소 전문가(서수정박사) 컨설팅 : ‘19.12.19./’20.02.20.

◦ 건축도시공간연구소 방문 컨설팅                 : ‘20. 02. 20.

◦ 전문가(서수정박사 외 3인) 현장 방문            : ‘20. 03. 03.

◦ 건축도시공간연구소장 시장 방문                 : ‘20. 04. 14.

◦ 전문가(윤주선박사, 장민영박사) 방문 협의        : ‘20. 05. 28.

◦ 업무 위(수)탁 협약(건축공간연구원)              : ‘20. 09. 10.

◦ 도시재생 마스터플랜 및 전략계획 수립 용역 착수 : ‘20. 09. 14.

◦ 착수보고(시장)                                  : `20. 11. 05.

□ 추진계획

◦ 통합마스터플랜 수립                           : `20. 09. ~ `21. 09.

◦ 도시재생 전략계획 변경                        : `21. 06.

도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소 (금암,월락,향교,왕정,신촌,노암)

◦ 면    적 : 2,176천㎡ (사유지 1,292천㎡, 국・공유지 884천㎡)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2025년 (9년간)

◦ 사 업 비 : 16,000백만원 (시비) / 21년 예산 : 2,000백만원

◦ 연도별 투자계획                                   (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2021이후	비 고
계	16,000	6,500	2,000	2,000	5,500
균 특	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	16,000	6,500	2,000	2,000	5,500

□ 추진실적

◦ 장기미집행 도시계획시설(도시공원) 실시계획인가 용역 추진 : ‘19. 09. ~ ‘20. 04.

◦ 도시공원 실시계획 인가	: ‘20. 06. 26.

- 장기미집행 도시공원 일몰제 기간 유예 2020. 07. → 2025. 07.

- 일몰제에 따른 장기미집행 도시공원 해제	: ‘20. 07. 01.

·해제 2개소(운봉, 인월공원) 일부해제(왕정공원)

◦ 도시공원 부지매입 및 물건 보상 추진

- 매입공원 : 6개 공원(금암, 향교, 왕정, 월락, 노암, 신촌공원)

·매입대상 현황 : 사유지 1292천㎡ 중 413천㎡ 8,500백만원 매입완료(32%)

□ 쟁점 및 대책

◦ 추진 중인 사업과 연계성이 높고 활용도가 높은 필지를 우선 매입

◦ 시민들이 이용하는 공원 내 기 조성된 산책로, 휴식공간 등의 인근 사유지를 우선 매입하여 시민들의 불편 발생 방지

◦ 2025년까지 유예된 일몰제에 대비하여 해제 후 난개발 가능성이 높고 추후 사업에 효용성이 높은 토지 위주 우선 매입

□ 추진계획

◦ 도시공원 편입토지 및 지장물 조사	: ‘21. 1월

◦ 보상계획 공고·통지 및 이해관계인 의견청취	: ‘21. 01. ~ 02.

◦ 편입토지 및 지장물 감정평가 실시 및 협의요청	: ‘21` 3월

◦ 도시공원 사유지 매입 추진	: ‘21. 03. ~ ’25. 06.

금암공원 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 사업내용 : 근린공원 조성(인도교, 산책로, 종탑·우물복원, 까페전망대, 쉼터, 화장실 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년(7년간)

◦ 총사업비 : 11,500백만원(부지매입 10,000, 용역비 3,000, 공원조성 102,000)

- 21년 예산 : 2,500백만원

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	11,500	1,300	10,200	2,000	2,500	2,500	2,500	700
국비
도비
시비	11,500	1,300	10,200	2,000	2,500	2,500	2,500	700

□ 추진실적

◦ 금암공원 조성사업 추진계획 수립	: `19. 12. 05.

◦ 1단계 금암공원 조성사업 착수	: `20. 02. ~‘21. 12.

- 1단계 사업비 : 7,000백만원(전기 719, 조경·기타 6,281)

·전기분야 : 금수정 및 수목 경관조명, 인도교 조명, 가로등 설치 등

·조경분야 : 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 까페전망대, 쉼터, 화장실 등

- 추진상황 : 기존 건물(4동) 철거, 종탑·우물 복원 추진, 데크산책로(70%)

벽천폭포(기초타설), 까페전망대(설계완료)

□ 추진계획

◦ 1단계(1차분) 사업시행	: `21. 04.까지

◦ 금암공원 문화재 발굴조사                        : `21. 01 ~ 06.

◦ 금암공원 조성사업(2차분) 계약 및 사업시행	: `21. 03. ~ 12.

- 인도교, 생태놀이터, 동선포장, 화장실, 주차장 등

◦ 금암공원 원불교 종 인수	: `21. 04.

◦ 2단계 사업시행(관광객 유인시설)                  : `22. 01. ~ `24. 12.

- 프로포즈 존, 장미터널, 다목적 광장, 체육시설, 수목식재 등

어린이공원 새단장

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 어린이공원 새단장(탄성포장, 퍼걸러, 수목정비, 화장실 신축 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

◦ 사 업 비 : 1,900백만원 / 21년 예산 : 200백만원

◦ 연도별 투자계획                                  (단위 : 개소/백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	13 / 1,900	7 / 1,100	2 / 200	2 / 200	2 / 400
새 단 장	12 / 1,200	6 / 400	2 / 200	2 / 200	2 / 400
워터파크	1 / 700	1 / 700	-	-	-

□ 추진실적

◦ 2018년 어린이공원 새단장 사업 시행(3개소)	: `18. 01. ~ 06.

- 도통 3호(용성중 옆), 도통 7호(도통동사무소 옆)), 도통 6호(물방개 워터파크)

◦ 2019년 어린이공원 새단장 사업 시행(3개소)	: `19. 01. ~ 07.

- 향교 4호(중앙초 옆), 도통 1호(시청북문), 도통 2호(녹주맥반석 옆)

◦ 2020년 어린이공원 새단장 사업시행(2개소)	: `20. 04. ~ 07

- 향교 1호(덕인회관 옆), 도통 5호(예닮교회 앞)

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진                              : `21. 01 ~ 02.

◦ 공사시행                                       : `21. 03 ~ 05.

- 새단장 : 도통 4호(도통초 옆), 노암 1호(노암5통)

- 화장실 신축 : 도통 5호(예닮교회)

만인공원 광장 및 교차로 개선사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원

◦ 사업내용 : 광장조성 및 교차로 개선사업

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3년)

◦ 사 업 비 : 4,600백만원(용역비 205, 부지매입 2,000, 공원조성 2,395)

- 21년 예산 : 500백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	4,600		205	500	3,895
균 특
도 비
시 비	4,600		205	500	3,895

□ 추진실적

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 디자인 공모	: `19.  03. ~‘20. 03.

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계용역 발주계획 수립 : `20. 03. 30.

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계공모(설계권부여)	: `20. 04. ~ 05.

- 응 모 자 : 1개 업체(경기도 양주시)

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계공모 재공고 : `20. 05. 20.

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선사업 공모 추진    : `20. 05. ~ 08.

- 응모 : 8개 업체, 접수 : 1개 업체

◦ 기본 및 실시설계용역 가격입찰 후 PQ            : `20. 09. ~ 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수                       : `20. 12. 03.

- 용역사 : ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 + ㈜인우

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 추진	: `20. 12. 03 ~ `21. 05. 31.

- 추진상황 의회 보고, 주민설명회 개최

◦ 편입토지 및 지장물 보상	: `21. 06 ~`22. 03.

◦ 사업시행	: `22. 03 ~ 12.

왕정공원 산림욕장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산37번지 일원

◦ 면    적 : 30,000㎡

◦ 사업내용 : 전망대, 야외쉼터, 데크산책로, 숲속교실, 어린이 놀이터 등

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년 (2년)

◦ 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600, 시비 600) / 21년 예산 : 400백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	1,200		800	400
균 특	600		400	200
도 비
시 비	600		400	200

□ 추진실적

◦ 왕정공원 산림욕장 타당성조사 용역	: `19.10.08 ~ 12.06.

◦ 문화재 지표조사 용역                         : `20.02.10 ~ 11.05.

◦ 기본계획 및 실시설계용역                    : `20.03.25 ~ 12.15.

◦ 소규모 환경영향평가 용역                     : `20.04.27 ~  12.17.

◦ 소규모 재해영향평가 용역                     : `20.09.17 ~ 11.15.

◦ 공원조성계획(변경) 열람공고(14일간)           : `20.12.11 ~ 12.24.

□ 금후계획

◦ 도시계획위원회 심의, 도시관리계획 결정(변경) 및 고시 : `21. 01.

◦ 왕정공원 산림욕장 조성계획 승인(전라북도)    : `21. 02.

◦ 원가심사(전라북도) 및 발주                   : `21. 02 ~ 03.

◦ 사업 시행	: `21. 03 ~ 09.