2021년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획안

심의 번호			제출년월일 : 제 출 자 : 제안설명자 :	2021. 02. . 남 원 시 장 자치행정국장

1. 제안이유

❍ < 남원 청년메이커스 신축 >

2020년 인구감소지역 통합지원 공모 사업 유치로 남원시 청년

창업공간인 청년 메이커스를 신축하여 지역경제 침체 극복과 청년들의 사회참여 일자리 확보를 위한 취·창업 지원 플랫폼과

거점공간 제공

(기획실)

2. 주요골자

❍ 취득하고자 하는 재산 – 1건          690㎡ --  1,753,000천원

․ 건   물 : 1동                      690㎡ --  1,753,000천원

-	남원 청년메이커스 신축	----	1동	690㎡	1,753,000천원

3. 법적근거

◦ 공유재산 및 물품관리법제10조 및 같은법 시행령 제7조

◦ 남원시 공유재산 관리조례 제12조

4. 금후계획

◦ 공유재산 심의회 심의, 의결 후 사업시행에 따른 재산취득

남원 청년메이커스 신축 계획

		필 요 성

◦ 인구감소지역 통합지원사업 공모 선정에 따라 시유지를 활용한

남원 청년메이커스 신축으로 청년들의 지역 내 수용과 유입을 위한   청년 정착시스템 대응이 가능하며,

◦ 학업(고등학교, 대학교)을 마친 청년들에게 지역 정착을 위한

사회참여와 일자리 확보에 필요한 취·창업 지원 플랫폼과 거점공간       확보가 시급함

		사업개요

◦ 사 업 명 : 남원 청년메이커스 조성사업

◦ 위    치 : 남원시 동충동 50-3외 1필지

◦ 총사업비 : 1,753백만원(특교세 400, 시비 1,353)

◦ 사업기간 : 2020. 8. ~ 2022. 1.

◦ 사업내용 : 지상3층, 연면적 690㎡, 1동건립

- 남원 청년창업공간(메이커스) 신축(3층 1동)

- 남원 청년자립도전 사업단 운영

		추진현황

◦ 인구감소지역 통합지원 공모사업 선정             : 2020. 6.

◦ 행정안전부 전문가 컨설팅(비대면)	: 2020. 8.

◦ 인구감소지역 통합지원사업 관리카드 제출(행안부) : 2020. 10.

◦ 청년메이커스 신축을 위한 공기관 협의	: 2020. 10.

◦ 청년메이커스 신축 계획 검토                     : 2020. 11.

		위 치 도

시외버스 터미널

메이커스

		현장사진

		금후계획

◦ 공공건축 기획심의 의견서 및 산출내역서 작성 : 2020.  11. ~ 12.

◦ 공공건축심의위원회 심의	: 2020.  12.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2020.  12. ~ 2021. 3.

◦ 공사 계약(원가)심사 및 일상감사              : 2021.  4.

◦ 공사 계약심사 및 입찰	: 2021.  4.

◦ 공사발주 및 시행	: 2021.  5. ~ 2021. 12.

◦ 준공	: 2021.  12.