농    정    과

농업수리시설 디지털 시스템 구축사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 재해위험저수지 정비사업 및 지표수 보강 개발사업이 완료 예정인 저수지(왈길제, 낙덕제)에 대하여 설계빈도 이상의 호우 대비 예ㆍ경보 시스템 구축해 시민 생명 및 재산 보호

□ 개    요

◦ 위    치 : 왈길저수지(대산면 풍촌리), 낙덕저수지(주천면 배덕리)

◦ 사업기간 : 2022년

◦ 사업내용 : 예ㆍ경보 시스템 구축

- 계측기설치 : 강우량계, 수위계, 변위 계측기, 계측정보 자동 수집장치

- 상황전파 시스템 : 마을댁내 무선방송 시스템, 옥외 무선방송 시스템

- 실시간 모니터링 시스템 : 상황관제, 모니터링 시스템

◦ 총사업비 : 7억원(국비 3.5, 도비 1.4, 시비 2.1)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
국 비	3.50			3.5
도 비	1.40			1.4
시 비	2.10			2.1
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 왈길제 재해위험저수지 정비사업 시행	: ‘18.02. ~ ’21.12.

◦ 낙덕제 지표수 보강 개발사업 시행	: ‘18.12. ~ ’21.12.

◦ 중앙부처(행정안전부 자연재난과) 출장	: ‘21.03.11.

□ 금후계획

◦ 2022년 신규사업 대상지 신청	: ‘21.03.15. ~ 03.22.

◦ 사업 시행	: ‘22.01. ~ 12.

세전지구 배수개선사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 집중 호우시 섬진강댐 수위 조절을 위한 방류량 증가로 인한 섬진강 외수위 상승으로 송동 세전지역 자연배제가 불가하여 지속적으로 침수 피해 발생함에 따라 배수개선 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 송동면 세전리 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 배수펌프장 신설 1개소, 배수로 정비 5.6㎞ 등

◦ 총사업비 : 103.85억원(국비 103.85)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	103.85	0.00	0.00	10.00	93.85
국 비	103.85			10	93.85
도 비	0.00
시 비	0.00
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 송동 세전배수장 주변 침수	: ‘20.08.08.

◦ 농림축산식품부 기획조정실장 면담	: ‘20.10.28.

◦ 2021년 배수개선사업 기본조사대상지 제출(시→도)	: ‘20.12.17.

◦ 기본조사대상지 현지점검	: ‘21.01.14.

◦ 중앙부처(농림축산식품부 간척지농업과) 출장	: ‘21.03.11.

□ 금후계획

◦ 배수개선사업 대상지 선정	: ‘21.04. ~ 05.

◦ 사업 시행	: ‘22.01. ~ ’25.12.

재해위험저수지 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 노후 저수지 보강으로 재해 피해 사전 예방

◦ 수리시설 보강으로 안전영농 및 농업생산 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 위    치 : 강석저수지(대강면 강석리), 금탄저수지(대강면 월탄리)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 저수지 시설 보강 1식

◦ 총사업비 : 40억원(국비 20, 도비 8, 시비 12)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	40.00	0.00	0.00	2.00	38.00
국 비	20.00			1	19
도 비	8.00			0.4	7.6
시 비	12.00			0.6	11.4
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 정밀안전진단	(D등급)	: ‘19.12.

◦ 중앙부처(행정안전부 자연재난과) 출장	: ‘21.03.11.

□ 금후계획

◦ 2022년 신규사업 대상지 신청	: ‘21.03.15. ~ 03.22.

◦ 사업 시행	: ‘22.01. ~ ’25.12.

서천지구 배수개선사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 집중 호우시 람천 외수위 상승으로 자연배제가 불가하여 지속적으로 침수 피해 발생함에 따라 배수개선 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 서천리, 북천리, 준향리 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년

◦ 사업내용 : 배수문 4개소(신설 2, 확장 2), 배수로 정비 2.6㎞ 등

◦ 총사업비 : 34.97억원(국비 34.97)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	34.97	0.50	5.00	20.00	9.47
국 비	34.97	0.5	5	20	9.47
도 비	0.00
시 비	0.00
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 배수개선사업 신규착수 지구선정	: ‘20.06.08.

◦ 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사 남원지사)	: ‘20.11.12.

◦ 실시설계 용역 착수	: ‘20.11.16.

◦ 중앙부처(농림축산식품부 간척지농업과) 출장	: ‘21.03.11.

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 및 행정절차 이행	: ‘21.03. ~ 08.

◦ 주민설명회 개최	: ‘21.04.

◦ 공사 착공 및 용지보상 시행	: ‘21.10.

◦ 공사 준공	: ‘23.12.

재해위험저수지 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 노후 저수지 보강으로 재해 피해 사전 예방

◦ 수리시설 보강으로 안전영농 및 농업생산 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 위    치 : 감동제외 8개소

- ‘22 착공지구 : 수철제, 금곡제, 수동제, 침동제, 용궁1제, 노봉제

- ‘22 계속지구 : 옥전제, 과리제

- ‘22 마무리지구 : 감동제

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년

◦ 사업내용 : 저수지 시설 보강 1식

◦ 총사업비 : 194.7억원(국비 97.35, 도비 38.94, 시비 58.41)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	194.70	18.58	13.40	23.00	139.72
국 비	97.35	9.29	6.70	11.50	69.86
도 비	38.94	3.72	2.68	4.60	27.94
시 비	58.41	5.57	4.02	6.90	41.92
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ ‘22 계속ㆍ마무리지구(감동제외 3지구) 공사 추진	: ‘20.01. ~ 12.

- 감동제, 왈길제 : 보상 및 제당ㆍ여수토 등 시공

- 옥전제, 과리제 : 보상 및 현장사무실, 복통 등 시공

◦ ‘22 착공지구(수철제외 5지구) 선정	: ‘20.09.22.

◦ ‘22 착공지구 농어촌공사 위ㆍ수탁 협약 체결	: ‘21.02.25.

□ 금후계획

◦ ‘22 마무리지구 사업 시행	: ‘21.01. ~ ’22.12.

◦ ‘22 계속지구 사업 시행	: ‘21.01. ~ ’23.12.

◦ ‘22 착공지구 실시설계용역 시행	: ‘21.01. ~ 12.

◦ ‘22 착공지구 사업 시행	: ‘22.01. ~ ’24.12.

□ 재해위험저수지 정비사업 현황

지 구 별		위 치	사업개요	사업비(백만원)					공정률 (%)	사업기간
				계	기투자	2020	2021	‘22이후
계		17개 지구		37,838	14,156	2,988	4,422	16,272		`15 ~ `24
완료	소계	7개 지구		14,426	13,236	1,190
	청계제	아영청계	시설보강1식	2,450	2,450				100	`15 ~ `17
	방평제	수지호곡		1,000	1,000				100	`15 ~ `17
	내기제	이백강기		1,000	1,000				100	`15 ~ `18
	숲멀제	운봉권포		1,992	1,992				100	`15 ~ `18
	입촌2제	이백과립		1,640	1,640				100	`17 ~ `18
	행정제	운봉행정		2,618	2,378	240			100	`17 ~ `20
	용궁2제	주천용궁		3,726	2,776	950			100	`17 ~ `20
계속	소계	4개 지구		10,412	920	1,798	3,982	3,712
	감동제	대산풍촌	시설보강1식	2,896	380	998	300	1,218	40	`18 ~ `22
	왈길제	대산길곡		3,942	460	400	3,082	0	20	`18 ~ `21
	옥전제	대강옥택		1,617	32	200	300	1,085	13	`19 ~ `23
	과리제	이백과립		1,957	48	200	300	1,409	7	`19 ~ `23
신규	소계	6개 지구		13,000	0	0	440	12,560
	수철제	운봉공안	시설보강1식	1,600			60	1,540	0	`21 ~ `23
	금곡제	이백강기		1,600			60	1,540	0	`21 ~ `23
	수동제	사매계수		2,000			80	1,920	0	`21 ~ `24
	침동제	산동부절		2,300			80	2,220	0	`21 ~ `24
	용궁1제	주천용궁		2,500			80	2,420	0	`21 ~ `24
	노봉제	사매서도		3,000			80	2,920	0	`21 ~ `24