산 림 녹 지 과

무궁화 동산 조성사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦	생활권 주변에 무궁화 동산을 조성함으로써 시민들이 나라꽃 무궁화를 쉽게 접할 수 있는 기회 제공

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 251번지 일원(교룡산 국민관광지)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 5,000㎡

◦ 총사업비 : 1억원(국비 0.5, 도비 0.15 시비 0.35)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	2.00	1.00	-	1.00
국 비	1.00	0.50	-	0.50
도 비	0.30	0.15	-	0.15
시 비	0.70	0.35	-	0.35
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황

◦ 국가예산 확보를 위한 전라북도 출장    : `21. 03. 12.

□ 금후계획

◦ 2021년 공모계획 시달                          : `21. 08.

◦ 사업계획서 제출(전라북도)                      : `21. 09.

◦ 사업 확정                                      : `21. 10.

미세먼지 차단숲 조성사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦	미세먼지를 발생원으로부터 생활권으로의 확산을 차단하고 양질의 공기공급과 흡수를 통해 농도를 저감하는 숲 조성

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 용정동 산101-4번지 일원 (광치천)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 2.0ha

◦ 총사업비 : 20억원(국비 10, 시비 10)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	40.00	-	20.00	20.00
국 비	20.00	-	10	10
도 비	0.00	-	-	-
시 비	20.00	-	10	10
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황

◦ 국가예산 확보를 위한 전라북도 출장    : `21. 03. 12.

□ 금후계획

◦ 2021년 공모계획 시달                          : `21. 06.

◦ 사업계획서 제출(전라북도)                      : `21. 07.

◦ 사업 확정                                      : `21. 09.

남원목기 산업특화림 조성사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 남원목기 지역브랜드화를 통하여 목기산업 육성 및 산림의 다양한 기능 증진

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 송동면 장국리 산18-1번지 외 13필지 등

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2026

◦ 사업내용 : 물푸레나무, 옻나무 식재

◦ 총사업비 : 20억원(국비 10, 도비 3, 시비 7)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00
국 비	10.00	-	-	5	5
도 비	3.00	-	-	1.5	1.5
시 비	7.00	-	-	3.5	3.5

□ 추진상황

◦ 전라북도 산림녹지과 타당성 설명 및 건의          :‘21. 2. 25.

⇒ 사업내용, 사업규모 검토 후 신청

□ 금후계획

◦ 조림 사업 예정지 조사                            :‘21. 03.

◦ 사업 예정지 벌목 관련 인허가 등 행정절차 이행        :‘21. 04. ~ 06.

◦ 사업 예정지 벌목작업 및 작업로 개설              :‘21. 06. ~ 10.

◦ 남원목기 산업특화림 조성사업  실시설계용역       :‘22. 01. ~ 02.

◦ 남원목기 산업특화림 조성사업  시행               :‘22. 03. ~ 05.