관    광    과

계획공모형 지역관광개발사업

【기금, 계속】

□ 필 요 성

◦ 노후화된 남원관광지 재생을 통한 관광 1번지 남원의 옛명성 회복

◦ 대표관광지 광한루원과 연계한 관광코스 개발로 연계관광 도모

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원관광지 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년)

◦ 사업내용 : 문라이트파크 조성 및 운영, 브랜드 공연, 연계코스 개발, 브랜드 개발 등

◦ 총사업비 : 150억원(기금 60, 도비 30, 시비 60)          (단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	15,000	200	720	6,580	7,500
기 금	6,000	100	360	2,540	3,000
도 비	3,000			1,500	1,500
시 비	6,000	100	360	2,540	3,000
기 타	0.00

□ 추진상황

⚪ 계획공모형 지역관광개발사업 공모 최종 선정	: ‘20. 03.

⚪ 기본계획 수립 용역 추진	: ‘20. 09.

⚪ 기본계획 수립 착수 보고	: ‘20. 09.

⚪ 기본계획 수립 용역 중간보고                             : ‘21. 02.

□ 금후계획

⚪ 기본계획 수립 준공	: ‘21. 04.

⚪ 실시설계 및 영상미디어콘텐츠 용역 추진	: ‘21. 05.

옛다솜 이야기원 조성사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 남원만이 가지고 있는 사랑과 관련된 이야기 자원을 활용한 신규 관광개발사업을 통해 광한루원과 연계한 이야기 클러스터 조성 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 함파우유원지 일원(노암동․어현동)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

◦ 사업내용 : 옛다솜 이야기정원, 사랑체험관 건립

◦ 총사업비 : 174억원(국비 81, 시비 93)                  (단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	17,366	10,832	3,200	3,334
국 비	8,058	4,791	1,600	1,667
도 비	0.00
시 비	9,308	6,041	1,600	1,667
기 타	0.00

□ 추진상황

⚪ 지방재정투융자심사(도, 조건부)	: ‘18. 10.

⚪ 옛다솜이야기원 기본 및 실시설계 완료	: ‘19. 04.

⚪ 옛다솜이야기원 기반시설 조성공사 착공	: ‘19. 07.

⚪ 옛다솜이야기원 조성공사 착공                            : ‘19. 11.

⚪ 옛다솜이야기원 기반시설(전기/통신) 착공                  : ‘20. 01.

⚪ 옛다솜이야기원 조성공사(전기/통신) 착공                  : ‘20. 01.

⚪ 옛다솜이야기원 사랑체험관 건립공사 착공                 : ‘21. 03.

□ 금후계획

⚪ 옛다솜이야기원 기반시설 완료	: ‘21. 12.

⚪ 옛다솜이야기원 조성공사 완료	: ‘21. 12.

⚪ 옛다솜이야기원 건립공사 완료	: ‘22. 12.

지리산 친환경 전기열차 도입

【국가사업, 계속】

□ 필 요 성

◦ 국립공원 교통체계 개편으로 기후 변화에 대응 및 지리산 생태계 보전

◦ 동절기 차량통행 제한지역 거주 산간벽지 주민 교통기본권 제공

◦ 특화된 관광산업 육성 및 국토균형발전 차원 지역경제 활성화 방안 마련

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면 고기리 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2026년(6년)

◦ 사업내용 : 차량 제작, 궤도 부설, 시스템 구축, 시험 운행 등

◦ 총사업비 : 278억원(국비 278)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	278.00	9.00	47.00	90.00	132.00
국 비	278.00	9	47	90	132
도 비	0.00
시 비	0.00
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ (진흥원) 산악벽지용 친환경 전기열차 기술개발 공고       :‘20. 5. 29.

- 주관연구기관 철도기술연구원 선정                          :‘20. 7. 27.

◦ (철도연·남원시) 친환경 전기열차 지역 설명회 개최         :‘20. 11. 10.

◦ (철도연) 친환경 전기열차 도입 희망 지자체 사전수요조사 시행 :‘21. 2. 5.

※ 신청 지자체 (남원시, 순창군(이상 전북), 태백시, 횡성군, 양양군(이상 강원), 포항시, 울릉군(이상 경북), 하동군(경남)

□ 금후계획

◦ 친환경 전기열차 시범노선 지자체 선정 공고             : ‘21. 6.

◦ 친환경 전기열차 시범노선 지자체 제안서 접수           : ‘21. 8.

◦ 1차 제안서 평가(3배수 지자체 선발)                     : ‘21. 9.

◦ 2차 PPT 발표 및 현장실사 평가                         : ‘21. 10.

◦ 우선협상대상 지자체 선정 및 계약 체결                  : ‘21. 12.