2021. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템

◦ 겨울철 도로 제설대책 추진

◦ 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

◦ 읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

◦ 읍면지역시도 정비현황

◦ 농어촌도로 정비현황

◦ 통행불편 마을진입로 정비현황

◦ 위험도로 선형개선

◦ 도로 유지관리사업

◦ 도로 재해복구사업 추진

◦ 지방하천 정비사업

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

◦ 소하천 정비사업

◦ 하천 유지관리사업

◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

◦ 하천 재해복구사업

□ 시정질문·5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

											건 설 과 장
											서 지 호
건설행정담당										도로담당														하천담당
양 병 오										김 현 호														백 강 규
설해대책추진 도로 유지 관리․보수 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 노점상‧과적 단속										읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 기업유치 기반시설 확충사업 통행불편 도로사업 도로 유지 관리사업														치 수 사 업 하천유지관리 육상골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	37	1	3	7	4	4	□청원경찰 : 1 □공 무 직 : 17
현 원	36	1	5	4	2	6	□청원경찰 : - □공 무 직 : 18
증 감	△1	-	2	△3	△2	2	-

2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 지방재정 확충을 위한 국가예산 확보에 총력 - 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 사업 반영 대응(5개 노선) ·국도 24호선(이백~운봉) 2차로 개량, 국지도 37호선(인월~아영) 2차로 확장 및 개량, 국지도 60호선(주천 호경~고기) 2차로 개량, 국도 24호선 (대강~대산) 2차로 개량, 동부내륙권(정읍~남원) 2차로 개량 ※『동부내륙권(정읍~남원)』구간 중, 국도 미지정 구간(임실 덕치~ 순창 동계~남원 주천) L=30.9㎞ 국도 지정(승격) / 2021. 5. 13. - 대강 하이패스 I.C 설치(한국도로공사) : 사업 조기 추진 건의(2회) - 춘향휴게소(순천~완주간 고속도로) 조기 착공 : `21. 3월 공사 착공 - 도산~서매 도로(도비 400백만원) / 서남원IC 회전교차로(국비 140백만원) 국 ․ 도비 540백만원 확보 ◦ 도로·하천 수해복구 조기 추진으로 주민 불편 최소화 - 재해복구 86개 지구(도로 15, 하천 71) 중 81개 지구 발주 완료 (도로 2,094백만원 / 하천 13,889백만원) ※ 58개 지구 공사 완료(도로 13개, 하천 45개 지구) - 소규모 도로·하천 재해복구공사 : 우기 이전 완공 추진 - 수해피해 신고 누락분에 대한 전수조사 및 신속한 실시설계 용역 추진으로 우기 전 공사 착공하여 재해예방 추진 ◦ 시민 만족 중심의 도로·하천 유지관리 추진 - 도로 유지관리 : 7개 분야 / 73개소 / 18,445백만원 - 하천 유지관리 : 준설 및 잡목제거 등 추진 35개소 / 4,378백만원 - 법정 관리도로 총 57개 노선 431km에 대해 겨울철 제설작업, 노후포장도로 정비, 과속방지턱 정비, 도로안전시설물 설치 등 도로 유지관리 총력 - 하천 장비임차료 읍면동 자체예산 편성(600백만원)을 통한 응급 복구 및 준설 추진 ◦ 요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성 추진 - 가족단위 관광체험형 물놀이 분수광장 조성 완료에 따른 음악분수 상시 운영 및 코로나19 상황에 따라 물놀이 시설은 유동적 운영 추진

□ 지역 균형발전을 위한 도로개설 - 22개 지구 / 12,025백만원

(22개 지구 중 4개 지구 완료) - 추진 공정 20%

◦ 읍면지역시도 확포장 3개 지구 (L= 7.00㎞, 5,000백만원)

◦ 농어촌도로 확포장   7개 지구 (L=12.24㎞,  2,950백만원)

◦ 통행불편 마을진입로 9개 지구 (L= 5.36㎞, 2,670백만원)

◦ 위험도로 선형개량   3개 지구 (L= 2.10㎞,  1,405백만원)

□ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 – 51개소  / 6,420백만원

◦ 관내 주요 도로 아스콘 재포장         : 3개 지구 / 1.15㎞ / 500백만원

- 천거동 승사교 앞 교차로, 보절 진기마을 앞, 이백 오촌마을

◦ 교량(터널) 유지관리 및 정밀안전점검   : 7개 지구 / 1,570백만원

- 주송교, 이백교, 구룡교 내진보강공사 / 율천교, 남원대교, 광석교,

동림교 등 정밀안전진단 / 남원터널, 승사교 등 보수공사

◦ 기타 지역 도로 유지관리사업 추진      : 41개소 / 4,350백만원

- 사매~덕과 도로구조개선, 인재개발원~다사랑병원 인도설치 등

◦ 도로 제설작업(2020~2021)	:  12일(57개노선, 431.5㎞)

□ 재해 사전예방을 위한 하천정비 – 96개 지구 / 74,908백만원

◦ 지방하천 정비	:  3개소  /  11,688백만원

◦ 원천천 하천정비 및 친수공간 조성	:  1개소  /   5,000백만원

◦ 소하천 정비	:  4개소  /   5,082백만원

◦ 하천 재해복구사업	:   86개소 /  47,778백만원

◦ 하천 유지관리(지방하천, 소하천)	:  1식     /   4,378백만원

◦ 하천 유지관리(국가하천 섬진강, 요천)	:  1식     /     982백만원

	하반기 추진방향
◦ 각종 민원업무를 친절하고 신속한 처리로 시정에 대한 불만 해소 ◦ 관내 주요 간선도로망 확충을 위한 국가예산확보 적극 대응 ◦ 하천정비사업을 통해 이·치수와 더불어 친수 공간 조성에 기여 ◦ 태풍 및 집중호우로 인한 하천재해를 사전에 예방하기 위한 하도준설 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

국가하천 스마트 홍수관리시스템

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 국가하천 섬진강, 요천 일원

◦ 사 업 량 : 14개소(섬진강권역 5개소, 요천권역 9개소)

◦ 사업내용 : 수문개량(전동화), 상황실 구축(시청 내), 통신망 연결

- 원격 자동계측·제어·감시, 현장제어, 영상표출, 기록 시스템 등

◦ 사 업 비 : 2,037백만원 (국비 100%)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년(2년)

사 업 명	사업량	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2021	2022이후
국가하천 스마트 홍수관리시스템	14개소	2,037	137	1,900	-	100	‘20 ~‘21

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 추진	:‘20. 10. ~ 12.

◦ 전라북도 원가심사 완료	:‘21.  2. 10.

◦ 국고보조금 교부결정	:‘21.  3. 5.

- 당초 1,717백만원 → 변경 1,900백만원 (시설비 증액 183백만원)

◦ 추경 성립전 사용승인	:‘21.  3. 11.

◦ 공사 및 관급자재 발주	:‘21.  3. 12. ~

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 착공/공정률20%     :‘21.  3. 31.

- 전기·계측 : (주)중앙쏠라텍 대표 전혜원 / 남원시 소재

- 토목·기계 : (유)영도건설 대표 한덕희 / 남원시 소재

□ 금후계획

◦ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축 완료	:‘21.  6.

겨울철 도로 제설대책 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2021. 11. 15. ~ 2022. 3. 15.(4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)	노선수	작업량 (km)
57	431.5	3	25.1	8	154.9	24	38.5	22	213

◦ 제설 인력 : 27명 (도로보수원 12, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타(용역6))

◦ 제설 차량 : 13대 (15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기1)

◦ 제설 장비 : 279대

- 자체 보유 :  27대(제설기 12, 살포기 12, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍 면 동  : 252대(트랙터용제설기 249, 1톤용 제설기 3)

◦ 상황실 운영 : 건설과(2개조 5명), 각 읍면동사무소

◦ 제설자재 현황

(단위 :톤)

초 기 확 보 량				사 용 량				잔 량
계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제	계	염화 칼슘	제설용 소금	친환경 제설제
2,649	306	2,095	368	2,242	129	1,745	368	527	177	350	-

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립 및 제설자재 구입     : 2020. 11. ~ 2021. 3.

◦ 도로제설작업 추진(출동일수 12회)             : 2020. 12. ~ 2021. 2.

- 강설일수 23일, 적설일수 12일(대설경보 2회, 대설주의보 6회)

- 투입 장비 : 13대 (15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2), 굴삭기 1대)

- 투입제설제 : 2,242톤(염화칼슘 129, 제설용 소금 1,745, 친환경제설제 368)

□ 금후계획

◦ 미끄럼주의 표지판(25개) 및 모래주머니(20,000개) 설치  : 2021. 10.

◦ 상황실(건설과-2개조 5명, 읍면동) 운영	: 2021. 11. ~ 2022. 3.

◦ 제설차량 임차시행(15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)	: 2021. 12. ~

◦ 정령치 도로 통제(고기삼거리 ~ 정령치 ~ 달궁삼거리) : 2021. 12. ~ 2022. 3.

도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 변경 용역

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 읍면지역

◦ 사 업 량 : 읍면지역 시도 및 농어촌도로 353개 노선 L=852.6㎞

◦ 사 업 비 : 500백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년(4개년)

◦ 도급업체 : ㈜수성엔지니어링(경남 창원), ㈜성원기술개발(전북 김제)

□ 추진실적

◦ 기본계획 변경 용역 수행	: `18. 4. ~

◦ 농어촌도로 전략환경영향평가 / 사전재해영향성검토 용역 착수 : `18. 11.

◦ 도로건설계획, 농어촌도로 기본계획(변경) 의견반영(읍면동) : `19.  5. ~ 8.

◦ 읍면지역시도 및 농어촌도로 개선(안) 의견 수렴(남원시의회)  : `19. 11.

< 노선 검토 주요방향 >

◦ 읍면지역시도 : 도로 실효성 검토, 상위도로로 인한 단절구간 연결(중복결정)

◦ 농어촌도로 : 읍면 의견 수렴에 따른 노선 지정, 마을 주 진입도로

일제 노선 반영, 격하된 군도 노선 신규 지정

◦ 읍면지역 시도 노선 변경(승격) 협의(전북도)             : `21. 1. ~ 5.

< 검토(안) >

(단위 : km)

구 분	당 초		변 경		증 △감
	노선 수	연장	노선 수	연장	노선 수	연장
합 계	353	852.6	410	891.6	57	39.0
읍면지역 시도	22	215.1	21	164.7	△ 1	△ 50.4
농어촌도로	331	637.5	389	726.9	58	89.4

□ 금후계획

◦ 전략환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역 수행    : `21. 5. ~ 6.

◦ 도로건설 관리계획 수립 및 농어촌도로 변경 고시	: `21. 6.

읍면지역 안전한 도로망 확충 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 22개 지구, L = 26.7㎞

◦ 총사업비 : 73,850백만원(2021 : 12,025백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2028년(12개년)

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 량		총사업비	기투자	2021	2022이후	사업기간
계	22개지구	L=26.70㎞	73,850	19,725	12,025	42,100
읍면지역시도	3개지구	L=7.0㎞	21,300	6,013	5,000	10,287	`17~`25
농어촌도로	7개지구	L=12.24㎞	36,700	4,687	2,950	29,063	`17~`28
통행불편	9개지구	L=5.36㎞	10,850	5,430	2,670	2,750	`17~`23
위험도로 선형개선	3개지구	L=2.10㎞	5,000	3,595	1,405	-	`17~`21

□ 추진실적

◦ 읍면지역시도 : 완공(평촌~목가), 공사 중(부석~오촌, 도산~서매), 보상(목가~강기)

◦ 농어촌도로   : 공사 중(영촌선, 상황선, 도용선, 중송선),

설계 중(배촌선, 부흥선), 보상(견두선)

◦ 통행불편     : 공사  중(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 이백 오산길, 대산 안대실), 보상(인월 중군),

설계 중(송동 척동, 이백 목가)

◦ 위험도로     : 공사 중(수지 호곡, 군도 29호선), 보상(이백 초촌),

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도 : `21년 완공(도산~서매), `22년 완공(부석~오촌),

(3개 지구)      `25년 완공(목가~강기)

◦ 농어촌도로   : `21년 완공(도용선, 영촌선), `23년 완공(부흥선, 호은선),

(5개 지구)      `25년 완공(배촌선), `28년 완공(견두선)

◦ 통행불편     : `21년 완공(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평,

(9개 지구)                 이백 오산길, 대산 안대실, 인월 중군)

`23년 완공(이백 목가, 송동 척동)

◦ 위험도로     : `21년 완공(수지 호곡, 이백 초촌, 군도 29호선)

(3개 지구)

읍면지역시도 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 19개 사업 / 36.46㎞ / 72,530백만원

◦ 기 투 자 : 16개 사업 / 29.46㎞ / 51,230백만원

◦ 시 행 중 :  3개 사업 /  7.00㎞ / 21,300백만원(※ 2021 : 5,000백만원)

- `21 완공 : 2개 지구, `22 완공 : 1개 지구, `25완공 : 1개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2024년(19개년)

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2021	2022이후
합 계		3개지구	7.00	21,300	6,013	5,000	10,287	52
부석~오촌		송동면	2.60	5,900	2,300	800	2,800	52	`17 ~ `22
평촌 ~강기	소 계		2.50	13,900	3,113	3,700	7,087	49	`17 ~ `24
	평촌 ~목가	이백면	0.70	6,413	3,113	3,300	-	100	`17 ~ `21
	목가 ~강기		1.80	7,487	-	400	7,087	5	`21 ~ `25
도산~서매		주생면	1.90	1,500	600	500	400	73	`19 ~ `21

□ 추진실적

◦ 부석~오촌  : 3차분 추진(토공, 배수공) / 공정률 40%

◦ 평촌~강기

- 평촌~목가 : 공사 완료(4. 13.) / 공정률 100%

- 목가~강기 : 용지보상 추진(보상률 55%)

◦ 도산~서매  : 2차분 추진(구조물공, 배수공) / 공정률 60%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 1개 사업(도산~서매)

◦ 2022년 완료 : 1개 사업(부석~오촌)

◦ 2025년 완료 : 1개 사업(목가~강기)

농어촌도로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 25개 지구 / 29.65㎞ / 68,324백만원

◦ 기 투 자 : 18개 지구 / 17.41㎞ / 31,624백만원

◦ 시 행 중 :  7개 지구 / 12.24㎞ / 36,700백만원(※ 2021 : 2,950백만원)

- `21 완공 : 3개 지구, `23 완공 : 2개 지구, `25 이후 : 2개 지구

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2028년(23개년)

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	7개지구	12.24	36,700	4,687	2,950	29,063	21
영 촌 선	주생면	1.10	1,600	900	700	-	100	`19 ~ `21
상황선	산내면	0.60	1,950	1,150	800	-	100	‘18 ~ ‘21
도용선	주생면	0.67	1,650	1,100	550	-	100	‘17 ~ ‘21
호은선	주천면	0.90	1,800	-	100	1,700	6	`21 ~ `23
부흥선	보절면	1.20	2,100	87	100	1,913	9	`20 ~ `23
배촌선	주천면	3.77	9,600	900	500	8,200	15	‘19 ~ ‘25
견두선	수지면	4.00	18,000	550	200	17,250	4	‘18 ~ ‘28

□ 추진실적

◦ 영 촌 선	: 2차분 완료, 3차분 추진(측구 및 보조기층) / 공정률 80%

◦ 상 황 선    : 공사(최종) 완료(5월)

◦ 도 용 선	: 3차분 추진(구조물공, 배수공) / 공정률 65%

◦ 호 은 선	: 실시설계용역 추진(공정 80%), 주민설명회 개최(5. 14.)

◦ 부 흥 선	: 실시설계용역 추진(공정 50%), 주민설명회 개최(5.  3.)

◦ 배 촌 선	: 실시설계 완료, 소규모 환경영향평가, 사전재해 영향성

검토 용역 추진 / 중송지구 6월 완료

◦ 견 두 선    : 분할측량 및 보상계획 공고 완료

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 3개 지구(영촌선, 도용선, 상황선)

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(부흥선, 호은선)

◦ 2025년 완료 : 1개 지구(배촌선)

◦ 2028년 완료 : 1개 지구(견두선)

통행불편 마을진입로 정비현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 계    획 : 62개 지구 / 34.03㎞ / 34,436백만원

◦ 기 투 자 : 43개 지구 / 25.35㎞ / 17,636백만원

◦ 시 행 중 : 9개 지구 /   5.36㎞ / 10,850백만원(※ 2021 : 2,670백만원)

- `21 완공 : 7개 지구 / `23 완공 : 2개 지구

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2023년(16개년)

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2021	2022이후
9개 지구	5.36	10,850	5,430	2,670	2,750	49
주천 제바위마을	0.65	900	400	400	100	89	`19 ~ `21
아영 구지마을	0.34	700	500	200	-	100	`19 ~ `21
운봉 장동마을	0.45	500	300	200	-	100	`19 ~ `21
인월 장평마을	0.50	1,800	880	920	-	100	`19 ~ `21
인월 중군마을	0.78	1,950	1,550	400	-	100	`17 ~ `21
이백 오산길	0.78	850	400	450	-	100	`19 ~ `21
대산 안대실마을	0.46	1,250	1,250	-	-	100	`18 ~ `21
송동 척동마을	0.60	1,000	-	-	1,000	-	`21 ~ `23
이백 목가마을	0.80	1,900	150	100	1,650	13	`19 ~ `23

□ 추진실적

◦ 공사 중 : 6개 지구

- 주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평, 이백 오산길, 대산 안대실

◦ 용지보상 : 2개 지구(이백 목가, 인월 중군)

◦ 실시설계 : 1개 지구(송동 척동)

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 7개 지구(주천 제바위, 아영 구지, 운봉 장동, 인월 장평,

인월 중군, 이백 오산길, 대산 안대실)

◦ 2023년 완료 : 2개 지구(송동 척동, 이백 목가)

위험도로 선형개선

(계속사업)

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	3개지구	2.1	5,000	3,595	1,405	-	100
이백 초촌	이백면	0.60	900	900	-	-	100	`20 ~ `21
수지 호곡	수지면	0.40	2,200	1,095	1,105	-	100	`19 ~ `21
군도29호선 (지리산IC~아영면사무소)	아영면	1.1	1,900	1,600	300	-	100	‘17 ~ ‘21

□ 추진실적

◦ 이백 초촌	: 용지보상 추진(20% 완료)

◦ 수지 호곡	: 용지보상 추진(60% 완료),

2차분 추진(호곡교 교량 완료) /  공정률 45%

◦ 군도29호선(아영) : 4차분 추진(포장공) / 공정률 90%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료	: 3개 지구

- 군도29호선 :  6월 완료 추진

- 이백 초촌  : 용지보상 협의 및 공사 추진(토공, 배수 구조물)

- 수지 호곡  : 용지보상 협의 및 공사 추진(토공, 배수공, 포장공)

※ 호곡 삼거리 회전교차로 설치포함 추진

도로 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총사업비 : 6,420백만원(도비 480, 시비 5,940)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
합 계		14개 지구	6,420
읍면지역시도	관 내	2개 지구	1,700
농어촌도로	관 내	2개 지구	850
법정도로 유지관리	관 내	10개 지구	3,870

□ 추진실적 - 14개 지구 / 51개소 / 4,423백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 수지면 수송제 앞 도로정비공사 외 21개소 / 1,110백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 아영면 성리(농도213호) 배수개선 외 7개소 / 647백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(도로 유지관리, 재포장, 교량 유지관리 및 내진보강 등)

- 천거동 승사교 앞 아스콘 재포장공사 외 20개소 / 2,666백만원 추진

□ 금후계획

◦ 읍면지역시도·농어촌도로·동지역 도로(최종) 유지관리 추진 : `21. 6. ~ 12.

- 배수개선, 재포장, 교량(터널) 유지관리, 시설물 정비 등

◦ 공사 완료 : 수지면 수송제 앞 도로정비공사, 천거동 승사교 앞 아스콘 재포장 공사, 교량 내진보강공사(이백․주송교) 등

◦ 공사 추진 : 사매~덕과 도로구조개선사업, 시특법 교량(승사교)

보수보강공사, 아영면 성리 배수개선공사 등

□ 도로 유지관리사업 세부내역(2021년)

사 업 명		사업위치	사업량	사업비 (백만원)	비 고
합 계			14개 지구 / 51개소	6,420
읍면지역시도 유지관리			2개 지구 / 22개소	1,700
	시도유지관리	관내	유지관리사업 1식 / 8개소	500
	주민참여예산	L=3.89㎞	유지관리사업 14개지구	1,200
농어촌도로 유지관리			2개 지구 / 8개소	850
	농어촌도로 유지관리	관내	유지관리사업 1식 / 7개소	500
	구일선 배수개선	아영면	도로 배수개선 L=0.23㎞	350
법정도로 유지관리			10개 지구 / 21개소	3,870
	읍면지역 표지판 정비	관내	표지판 정비 1식	150	총사업비 : 300
	도로 결빙 예방사업	어현동 (문오로)	동결 억제 포장 L=0.34㎞	450	도 135 시 315
	교량 내진보강공사	이백교, 주송교	내진보강 2개소	1,000	도 300 시 700
	법정관리 시설물 안전점검	관내	정밀안전점검 용역 1식 / 2개소	150	도 45 시 105
	시특법 교량 보수보강공사	승사교	교면 재포장 A=4,560㎡	120	총사업비 : 1,600
	사매~덕과 도로 구조개선	사매면, 덕과면	도로 시설개선 L=1.0㎞	600	총사업비 : 1,300
	걷고 싶은 거리 조성	관내	인도 유지관리 1식 / 2개소	100
	교량(터널) 유지관리	관내	교량 보수보강 / 3개소	300
	도로 유지관리보수	관내	유지관리사업 1식 / 5개소	500
	법정도로 재포장	관내	유지관리사업 1식 / 3개소	500

도로 재해복구사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 도로

◦ 사 업 량 : 법정도로 15개소

◦ 복구내역

(단위 : 백만원)

구 분	개소	피해액	복 구 액				비 고
			계	국비	도비	시비
계	15	775	2,242	1,454	100	688
군도ㆍ농어촌도	9	403	1,254	1,254	-	-	국 100%
시 도	4	228	588	-	-	588	시 100%
시관리 지방도	2	144	400	200	100	100	국 50%, 도 25%, 시 25%

※ 수해복구 누락지구 추진 : 3개 지구, L=211m, 170백만원

(운봉 임리, 송동 흑송리, 송동 장국리)

□ 추진실적

◦ 응급복구공사 추진(자체 시비)	: `20.  8. ~ 10.

- 지방도 및 시관리 도로 20개소, 132백만원

◦ 수해복구 실시설계 용역 추진	: `20.  9. 24.

◦ 호우피해 복구예산 교부결정	: `20. 10. 26.

- 추가 경정예산 성립전 사용 승인(`20. 11. 17)

◦ 도로 수해복구공사 발주 완료	: `20. 12. ~ `21. 5. 14.

◦ 공사 완료(13개 지구)                          : `21.  5.

- 광치동(포도원), 고죽동, 금지 귀석, 주생 지당, 이백 양가, 대강 섬진로,

대강 남원터널, 덕과 신양, 주천 용궁, 어현동(문오로), 대산 풍촌,

수지 호곡, 주천 송치

※ 2개 지구(이백 효기, 금지 입암) : 하천 재해복구 병행 추진

□ 금후계획

◦ 수해복구 누락지구 공사 추진                 : `21. 5. ~ 8.

- 운봉 임리(군도 8호) 외 2개 지구

지방하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 풍천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2022년(11개년)

◦ 총 계 획 : 21개 지구 / 98.43㎞ / 190,771백만원

- 완료지구 : 13개 지구 / 45.05㎞ / 105,918백만원

(송내천, 내척천, 괴양천, 진기천, 백암천, 운교천, 풍천, 요천, 수외천, 수지천, 주촌천, 갈치천, 람천)

- `21년 사업 : 4개 지구 / 16,688백만원(도비 11,332, 시비 5,356)

하천별	지구별	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개하천	22.94	78,628	40,514	16,688	21,426	73
풍 천	소 계	5.50	37,351	21,808	6,500	9,043	76	`14 ~ `22
	청계지구	0.88	6,961	6,961	-	-	100	`17년준공
	풍천지구	4.62	30,390	14,847	6,500	9,043	70	`18 ~ `22
송치천	주천송치	2.04	9,966	9,466	500	-	100	`16 ~ `21
원천천	신촌~주천	13.70	23,583	6,200	5,000	12,383	48	`17 ~ `22
다산천	덕과만도	1.70	7,728	3,040	4,688	-	100	`18 ~ `21

□ 추진실적

◦ 풍  천(인월·두락·의지) : 2차분 시행(의지지구 L=2.1km) 취암교 등    / 공정률 60%

◦ 송치천 : 3차분 공사 추진중	/ 공정률 95%

◦ 원천천 : 2차분 추진중                                / 공정률 60%

◦ 다산천 : 3차분 추진중                                / 공정률 70%

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 2개 지구(송치천, 다산천)

◦ 2022년 완료 : 2개 지구(풍  천, 원천천)

원천천 하천정비 및 친수공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 신촌동 요천 합류부 ~ 주천면 고기리 일원

◦ 사 업 량 : 관광자원화 친수공간 조성 L=13.7㎞

- 축제 2.78km, 호안 5.16km, 자전거길 6.6㎞, 보․낙차공 12개소, 교량 9개소 등

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)

◦ 총사업비 : 23,583백만원(국비 1,600, 도비 14,908, 시비 7,075)

- 2021년 사업비 : 5,000백만원

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                          : ‘16.  9. 28.

◦ 용역 중간보고회 개최(시장)	: ‘18.  8.  3.

◦ 주민설명회 개최	: ‘18. 11. 29.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(1차) 요청 / 익산청   : ‘19.  3. 29.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 24,147백만원(증 5,326)

◦ 설계VE 완료(총사업비 100억원 이상 건설공사)         : ‘19.  5.  3.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(2차) 요청 / 익산청    : ‘19.  7. 19.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,139백만원(증 4,318 / 증 23%)

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘19.  9. 23.

◦ 조달청 원가심사 및 공사발주 의뢰                    : ‘19. 10.  8.

◦ 실시설계(안) 총사업비 변경 협의(3차) 승인 / 익산청    : ‘19. 11.  4.

- 사업비 : 당초 MP상 18,821백만원 → 23,583백만원(증 4,762 / 증 25.3%)

◦ 시설공사 도급업체 선정 및 착수                      : ‘19. 12. 23.

◦ 시설공사 1차분 준공 및 2차분 착공	: ‘21.  2.

□ 금후계획

◦ 시설공사 2차분 준공	: ‘21. 12.

- 편입용지 토지 협의매수 병행 추진

◦ 시설공사 총괄분 준공	: ‘22. 12.

소하천 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 30개지구 / 20.78㎞ / 44,511백만원

- 완료지구 :  7개지구 /  6.61㎞ / 20,762백만원

(뒤하천, 율치천, 율정천, 아곡천, 신동천, 장교천, 고평천)

-‘21년사업 : 4개지구 / 5,082백만원〔시비 5,082 (100%)〕※ 균특 지방이양에 따른 시비 부담금 증액

◦ 위    치 : 남원시 아영면 당동천 외 3개소

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2023년 (8개년)

지구별	위 치	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2021	2022이후
합 계	4개 하천	6.96	19,610	6,897	5,082	7,631	61
당동천	아영 봉대	2.69	10,711	4,859	2,500	3,352	69	‘18~‘22
오롱골천	운봉 주촌	0.82	2,350	1,768	582	-	100	‘19~‘21
과립천	이백 과립	2.20	4,180	160	1,000	3,020	28	‘20~‘23
산곡천	향교동	1.25	2,369	110	1,000	1,259	47	‘20~‘22

□ 추진실적

◦ 당  동  천 : 1차분 완료(‵20. 12), 2차분 추진 (호안정비 L=2.0km) 및 교량 1개소 등	/ 공정률 47%

◦ 오롱골천 : 1차분 완료(‵21. 5.), 2차분 추진(소하천정비 L=0.10km)  / 공정률 80%

◦ 과  립  천 : 실시설계 전라북도 사전설계검토(6월)

◦ 산  곡  천 : 실시설계 행정안전부 중앙사전설계검토(6월)

□ 금후계획

◦ 2021년 완료 : 1개 사업(오롱골천)

◦ 2022년 완료 : 2개 사업(당동천, 산곡천)

◦ 2023년 완료 : 1개 사업(과립천)

하천 유지관리사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소하천‧지방하천‧국가하천 일원

◦ 사 업 량 : 3개사업 / L =105.04km

◦ 사 업 비 : 5,360백만원(국비982, 도비1,384 시비 2,994)

◦ 사업기간 : 2021년

구 분	사업내용	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
합 계	3개 사업	105.04	5,360
하천 유지관리사업	하천 유지관리	15.0	600
	하천 하도준설	20.0	500
	주민참여예산	1.09	375
	소규모 민원해결	1.20	175
기성제 유지관리사업	지방하천 기성제 정비	30.0	2,728
국가하천 유지보수사업	섬진강, 요천 유지관리	38.9	982

□ 추진실적

【 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업 】

◦ 읍·면·동 하천 유지관리사업 대상지 제출 및 현지조사	: ‘20. 12.  1.

◦ 하천유지관리사업 추진	: ‘21.  3. ~

- 하도준설 / 이백면 백암천 등 23개소(L=12.44km) 중 1개소 완료(L=0.49km) 및 22개소 추진 중

- 유지관리 / 운봉읍 권포천 등 12개소(L=1.61km) 중 1개소 완료(L=0.24km) 및 11개소 추진 중

- 주민참여예산사업 / 광치동 율치소하천 외 6개소(L=1.3km) 추진 중

◦ 시특법 관리대상 배수통문 정밀점검용역 완료(지방하천)	: ‘21.  3. 11.

【 국가하천 유지보수사업 】

◦ 시특법 관리대상 배수통문 외 정밀점검용역 완료(요천)	: ‘21.  2. 22.

◦ 국가하천 유지관리사업 추진

- 하도준설 / 국가하천 요천(L=0.79㎞) 추진 중 (6월 완료 예정)

- 유지관리 / 국가하천 요천 신평제 정비공사 완료(5월)

□ 금후계획

▸ 하천 및 기성제(지방하천) 유지관리사업

◦ 하반기 하천유지관리 대상지 조사 및 선정	: ‘21.  6. ~ 8.

◦ 하반기 하천유지관리사업 추진	: ‘21.  9. ~

◦ 하천유지관리 대상지 수시 점검 및 공사 추진	: 연중 수시

▸ 국가하천 유지보수사업.

◦ 국가하천유지보수사업 추진(시설물 및 자전거도로 등)	: ‘21.  6. ~ 7.

◦ 국가하천유지보수 신규사업 익산청, 전북도 협의 추진	: ‘21. 10. ~

◦ 섬진강‧요천 보수 대상지 조사 및 공사추진	: 연중 수시

요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성

<요천 수변 관광 자원화 사업>

(계속사업)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 어현동 741번지 일원 / 요천 국가하천(고수부지/천변친수지구)

◦ 사 업 량 : 물놀이 분수광장 조성

- 음악분수 L=42m, 바닥분수 2개소 및 광장, 물놀이시설 A=1,170㎡

◦ 총공사비 : 9,150백만원[도비(동부권특별회계) 4,150, 시비 5,000]

- `20년 사업비 : 5,650백만원(도비 4,150, 시비 1,500)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년(5개년)

□ 추진실적

◦ 요천 내 수경시설 설치 추진계획 보고           : ‘17.  6. 28.

◦ 기본 및 실시설계 용역 추진                   : ‘17. 10. ~ `18. 12.

◦ 사업계획 변경 추진보고                       : ‘18. 11. 23.

※ 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 ⇨ 변경 : 물놀이 분수광장 / 고수부지

◦ 음악분수 공법선정 심의 완료                  : ‘19.  6. 17.

◦ 2019년 제2차 재정투자 재심의 완료(전라북도)   : ‘19.  6. 28.

◦ 하천점용허가 승인(익산청)                     : ‘19.  9. 30.

◦ 시공업체 선정 및 공사 착수	: ‘19. 10. 29.

◦ 관급자재(음악분수 시스템) 구입                : ‘20.  3. 25.

◦ 시의회 호우피해상황 보고                      : ‘20.  9. 16.

◦ 시설공사 준공 및 음악분수 운영                : ‘21.  4. ~

※ 물놀이 시설은 코로나19 상황에 따라 유동적 운영 추진

□ 금후계획

◦ 시설물 인수인계 추진(건설과 → 관광시설사업소) : ‘21.  6. ~

하천 재해복구사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 86개지구 / 47,373백만원

◦ 위    치 : 국가하천 조산지구 외 85개소

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3개년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	국비	도비	시비	비고
합 계(71개소)	47,373	46,837	268	268
국가하천(9)	2,765	2,765	-	-	남원시 대행사업
지방하천(23)	8,294	7,832	231	231	-
소하천(35)	5,313	5,239	37	37	-
개선복구(지방하천,2)	19,848	19,848	-	-	주촌천, 효촌천
개선복구(소하천,2)	11,153	11,153	-	-	감동천, 서당천

※ 수해복구 누락지구 추진 : 15개 지구 / L=2.48km / 546백만원

□ 추진실적

◦ 하천 응급복구공사 추진(시비)	: ´20.  8. ~ 10.

- 37개소 / 396백만원(예비비)

◦ 재해복구사업 실시설계 용역 추진	: ´20.  9. 11. ~

- 11건 / 884백만원

◦ 피해 복구액(국·도비) 확정	: ´20.  9. 24.

◦ 예산 성립전 사용승인(13,045백만원)	: ´20. 11. 17.

◦ 개선복구사업 실시설계 용역 추진	: ´20. 11. 25. ~

◦ 재해복구사업 공사 추진	: ´20. 12.  7. ~

- 총 71개소 중 45개소 완료 / 5개소 실시설계 중 / 21개소 공사 추진 중

◦ 수해피해 신고 누락지구 실시설계 용역 추진	: ´21. 5. ~

□ 금후계획

◦ 소규모시설 복구(21개소) 공사완료	: ´21.  6.

◦ 수해피해 신고 누락지구 공사 추진(15개소)	: ´21.  6. ~ 12.

◦ 하천 개선 ‧ 기능복원사업(5개소) 공사추진	: ´21.  6. ~

- 우기 전 위험구간 우선정비 추진

-  현장 품질·안전관리 및 민원업무의 신속한 해소 등 원활한 공사추진을 위해  “하천 개선복구사업 통합건설사업관리 용역” 추진 예정

□ 시정질문 추진상황

질문일자 : 2020. 9. 25. (제239회)		질문의원 : 김영태 의원
질문내용	구)금곡교 철거 요청
◦ 구)금곡교 철거 요청
추진상황
◦ 구)금곡교는 금지면 일원 섬진강 제방을 최초 정비한 1964년경 이전에 설치된 교량으로써, 현재의『섬진강 하천 기본계획』에 비추어 볼 때 하폭, 하천 홍수위 등에 적합하지 않은 교량으로, ◦ 2020년 8월 집중호우에 따른 금지면 일대의 막대한 호우피해가 발생하여, 구)금곡교 철거를 익산지방국토관리청에 건의하였으며, 『섬진강 섬진제 재해복구사업』에 구)금곡교 철거를 포함 사업을 추진 할 예정임. ◦ 섬진강 섬진제 재해복구사업 추진현황 【 사업개요 】 - 위 치 : 남원시 금지면 상귀리 ~ 하도리(방촌천 합류부 ~ 개전배수문) - 사 업 량 : 제방보축 L=2,728m, 구)금곡교 철거 L=249m - 사 업 비 : 27,281백만원 - 사업기간 : 2020. 10. ~ 2022. 11. - 발 주 처 : 익산지방국토관리청 하천계획과 ※ 공사 착공은 6월 예정으로, 시공사 선정 후 우기 전 구)금곡교 상판 철거 우선 시행 예정임.

질문일자 : 2020. 9. 25. (제239회)		질문의원 : 김영태 의원
질문내용	요천 수변 관광자원화 사업 관련 질의
◦요천 수변 관광자원화 사업이 수경 분수시설에서 사업계획이 변경된 경위 ◦요천 수변 관광자원화 사업의 현재까지 진행상황과 공사비 집행내역 ◦지난 호우피해로 현재 공사중인 사업장의 피해내역과 지금까지의 복구 현황, 앞으로의 추진계획
추진상황
◦ 사업계획 변경경위 - 당초 : 수경시설(분수) / 중앙저수로 → 변경 : 물놀이 분수광장/고수부지 - 요천 저수로(하천중앙)에 음악분수 상부보호 안전시설을 보강하더라도 현재 기술력의 한계로 기상이변 자연재해 시 시설물 보호에는 한계가 있음 - 타 시·군 선진사례 벤치마킹 결과 하천 고수부지를 활용 음악분수, 체육시설 물놀이장 조성으로 시민 여가활동 호응도가 높음 - 요천 고수부지를 활용한 종합시설(음악분수, 체험 바닥분수, 물놀이시설)을 도입하여 볼거리 제공 및 가족단위의 물놀이체험으로 남원 관광지와 연계 한 관광인프라 구축 ◦요천 수변 관광자원화 사업 진행상황과 공사비 집행내역 - 공사비 집행내역 기 보고 완료 : `20. 9월 - 토목공사 및 음악분수 시스템 준공 : `21. 4월 ◦ 호우피해로 현재 공사중인 사업장의 피해내역과 복구현황, 추진계획 - 도급 계약물량 중 피해부분 복구조치 완료 : `20. 12월 - 사업장 상류 기존 운동트랙 보강 및 저수호안 : `21. 6월 준공예정

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2020. 09. 25. (제239회)		발언의원 : 김영태 의원
발언내용	구)금곡교 철거 요청
◦ 구)금곡교 철거 요청
추진상황
◦ 구)금곡교는 금지면 일원 섬진강 제방을 최초 정비한 1964년경 이전에 설치된 교량으로써, 현재의『섬진강 하천 기본계획』에 비추어 볼 때 하폭, 하천 홍수위 등에 적합하지 않은 교량으로, ◦ 2020년 8월 집중호우에 따른 금지면 일대의 막대한 호우피해가 발생하여, 구)금곡교 철거를 익산지방국토관리청에 건의하였으며, 『섬진강 섬진제 재해복구사업』에 구)금곡교 철거를 포함한 사업을 추진 할 예정임. ◦ 섬진강 섬진제 재해복구사업 추진현황 【 사업개요 】 - 위 치 : 남원시 금지면 상귀리 ~ 하도리(방촌천 합류부 ~ 개전배수문) - 사 업 량 : 제방보축 L=2,728m, 구)금곡교 철거 L=249m - 사 업 비 : 27,281백만원 - 사업기간 : 2020. 10. ~ 2022. 11. - 발 주 처 : 익산지방국토관리청 하천계획과 ※ 공사 착공은 6월 예정으로, 시공사 선정 후 우기 전 구)금곡교 상판 철거 우선 시행 예정임.

발언일자 : 2020. 09. 25. (제239회)		발언의원 : 박문화 의원
발언내용	요천 고수부지 물놀이 분수광장 조성사업 전면 재검토
◦ 수경시설 바닥 화강석 마감 및 노출형 설비로 인한 이용자 안전 확보와 시설 무단침입으로 인한 안전사고․민원에 대한 대책 여부 ◦ 2020년 8월 폭우로 인해 하천수가 고수부지까지 범람하였을 때 상류에서 유실된 돌, 콘크리트 등이 놀이시설과 설비 충돌하였을 때 보호 조치 가능 여부 ◦ 화강석 판석은 시멘트 마감을 하였을 때, 하천수 유입으로 인한 방수층이 깨지고, 균열된 틈으로 수분이 침투하였을 때 동절기 동결․해동을 반복하여 균열이 심해질 것으로 예상되는데, 이에 대한 대책 ◦ 2020년 8월 수해를 통해 수경시설 피해 및 상당한 문제점이 대두되었음. 사업 전면 재검토 촉구 바람.
추진상황
◦수경시설 바닥 화강석 마감 및 노출형 설비로 인한 이용자 안전 확보와 시설 무단침입으로 인한 안전사고․민원에 대한 대책 여부 < 추진상황 > - 수경시설 바닥 화강석 마감 및 노출형 설비의 경우, 타지역 선진사례 벤치마킹을 통해, 탄성포장은 운영 및 유지관리시 청소 및 유지관리비용 과다지출(수시수선)로 화강석(표면:도드락)으로 시공하여 미끄럼 방지 등 안정성을 확보하였으며, 노출 시설물은 둔치범람을 우려 탈부착식으로 시공 하겠음 - 무단침입에 대한 안전사고․민원에 대한 대책은, 이용객 통제를 위해 수경시설 상부 인도부에 경관휀스 설치하였으며, 시설물 안전관리 요원 배치로 무단침입 방지 및 이용객 안전사고 방지를 추진하겠음. ◦ 2020년 8월 폭우로 인해 하천수가 고수부지까지 범람하였을 때 상류에서 유실된 돌, 콘크리트 등이 놀이시설과 설비 충돌하였을 때 보호 조치 가능 여부 < 추진상황 > - 고수부지 범람 시 외부 유입물 충돌에 대한 시설물 2차 피해 방지를 위해 사업장 상류 유실 운동트랙을 보강중이며, 저수호안 고수부지 시설개량(지수벽, 사석) 보강과, 음악분수 상부 노출노즐 보호벽(폴리카보네이트)을 설치 하겠음. ◦ 화강석 판석은 시멘트 마감을 하였을 때, 하천수 유입으로 인한 방수층이 깨지고, 균열된 틈으로 수분이 침투하였을 때 동절기 동결․해동을 반복하여 균열이 심해질 것으로 예상되는데, 이에 대한 대책 < 추진상황 > - 겨울철 동결 융해로 인한 시설물 탈락 방지를 위해, 화강석 및 블록포장은 습식포장으로 시공하였음.(탈락으로 인한 수질피해 방지) ◦ 2020년 8월 수해를 통해 수경시설 피해 및 상당한 문제점이 대두되었음. 사업 전면 재검토 촉구 바람. < 추진상황 > - ‘20. 8. 7. ~ 8. 9. 집중호우로 고수부지 범람(급류)에 따른 분수시설 및 물놀이장 피해는 음악분수 상류 둔치 기존 운동시설 바닥 유실로 콘크리트구체, 호박돌, 잡석, 부유물 등이 분수시설(노즐, 수중등)과 물놀이장(바닥, 벽체) 충돌로 시설물 피해(파손)가 발생하였으나, 피해부분에 대한 재발 방지 시공 중이며, 음악분수시설 시범운영 중임. 수해로 인한 피해가 재발하지 않도록 시설물 관리에 만전을 기하겠음.

발언일자 : 2020. 09. 25. (제239회)		발언의원 : 한명숙 의원
발언내용	집중호우 예방 대책 방안
◦ 집중호우로 인한 범람과 침수 피해를 막기 위해서는 단순한 하천정비와 준설만으로는 부족하므로 하상굴착 및 제방보강공사를 병행 추진 필요 ◦ 노암동 주촌천 요천 합류지점 홍수대책(역류로인한 범람 및 침수피해 발생) 방안(대책) ◦ 관내 지방하천과 소하천 실태조사를 통해 관리대상을 재정비하고 대대적인 하천 정비사업과 보강공사를 실시해 하천이 체계적으로 관리될 수 있도록 국고지원 확대를 적극 건의. ◦ 기존 수해 관리방식에서 벗어나 첨단기술을 활용해 자연재해를 선제적으로 예측하고 대비할 수 있도록 스마트 재난재해 대응 시스템 도입 필요.
추진상황
◦집중호우로 인한 범람과 침수 피해를 막기 위해서는 단순한 하천정비와 준설만으로는 부족하므로 하상굴착 및 제방보강공사를 병행 추진 필요 < 추진상황 > - 하천 시설물 보수보강 등 유지관리사업 추진 시 하천범람 현지조사를 면밀히 하여 필요시 하상굴착 및 제방보강공사 검토하여 집중호우로 인한 수해피해 예방에 만전을 기하겠음. ◦ 노암동 주촌천 요천 합류지점 홍수대책(역류로인한 범람 및 침수피해 발생) 방안(대책) < 추진상황 > - 2020년 8월 집중호우로 인한 노암동 주촌천 요천 합류지점 침수피해 발생에 대하여『주촌천 지방하천 개선복구사업』추진계획으로, 주촌천 하류 저지대에 대한 고수부지 정비 및 홍수방어벽 설치 등 저지대 침수 재발방지 등 침수피해 방지에 최선을 다하겠음. - 주촌천 지방하천 개선복구사업 추진현황 【사업개요】 ․ 위 치 : 주천면 배덕리 ~ 노암동 요천 합류부 ․ 사 업 량 : 지방하천 개선복구 L=5.79km ․ 사 업 비 : 12,534백만원(국비 100%) ․ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2022. 6.(※ 6월 말 착공 예정) ◦ 관내 지방하천과 소하천 실태조사를 통해 관리대상을 재정비하고 대대적인 하천 정비사업과 보강공사를 실시하여 하천이 체계적으로 관리될 수 있도록 국고지원 확대를 적극 건의. < 추진상황 > - 도내 지방하천 시설정비와 사업우선순위 재정비를 위하여 전라북도에서 지방하천 종합정비계획 재수립(M․P) 용역(‘20년 ~‘21년) 추진 중으로, 우리시에서 전북도 하천관리부서(공항하천과)에 관내 미개설 지방하천에 대한 사업이 우선 될 수 있도록 적극적인 사업반영 건의(국고지원확대)와 관내 소하천에 대한 전수조사 실시로 정비가 필요한 소하천에 대한 단계별 하천정비로 사전재해 예방에 만전을 기하겠음. ◦ 기존 수해 관리방식에서 벗어나 첨단기술을 활용해 자연재해를 선제적으로 예측하고 대비할 수 있도록 스마트 재난재해 대응 시스템 도입 필요. < 추진상황 > - 올해 한국판 뉴딜사업으로 국가하천 내 수동으로 조작되는 배수문(통문)의 전동화 및 자동화로 실시간 감시와 원격조작을 통해 강우로 인한 수위 상승 시 신속하고 효과적인 대응으로 재해를 예방하고자 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축사업 추진 중에 있음. - 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축사업 추진현황 【 사업개요 】 ․ 위 치 : 관내 국가하천 섬진강, 요천 일원 ․ 사 업 량 : 스마트 홍수관리시스템 14개소 구축(섬진강 5, 요천 9) ․ 사 업 비 : 2,037백만원(국비 100%) ․ 사업기간 : 2020. 10. ~ 2021. 8.

발언일자 : 2021. 3. 3. (제242회)		발언의원 : 한명숙 의원
발언내용	조산동과 노암동을 연결하는 요천 내 보행자 전용 교량 설치 제안
◦ 조산동과 노암동을 연결하는 요천 내 보행자 전용 교량 설치 제안
추진상황
□ 사업개요 ◦사 업 명 : 요천 인도교 신설사업 ◦위 치 : 남원시 조산동 ~ 노암동 요천 지내 ◦사 업 량 : 경관 디자인 교량 L=150m, B=4.0m ◦사 업 비 : 3,000백만원 (시비 100%) ◦사업기간 : 중장기 시행 검토 □ 추진상황 ◦해당지역에 남원도시관리계획 상 조산동과 노암동을 연결하는 도시계획도로(대로3-7, 중로2-23)가 계획되어 있음 ◦주변 도시계획도로 사업계획 및 교통성검토 등 사업의 타당성을 종합적으로 고려하여 중장기계획 시행 검토 필요 <위치도: 도시계획도>

발언일자 : 2021. 4. 16. (제 243회)		발언의원 : 김정현 의원
발언내용	남원시·임실군·순창군 화합의 도로 건설 제언
◦ 사매면 서도리 ~ 임실군 삼계면을 잇는 4㎞ 도로 개설로 남원․임실․순창 화합의 도로 도모
추진상황
□ 사업 개요 ◦ 사 업 명 : 삼계 오수간 지방도 745호 개설공사 ◦ 위 치 : 남원시 사매면 ~ 임실군 오수면 ~ 임실군 삼계면 일원 ◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=4.6㎞, B=9.5m(2차로) ◦ 사 업 비 : 368억원(도비 100%) □ 추진 상황 ◦ 전라북도 도로건설 관리계획 반영 건의 : `19. 3. ◦ 전라북도 도로건설 관리계획 수립 고시 : `20. 12. 28. - 전라북도 투자 우선순위 2순위 반영 □ 금후 계획 ◦ 타당성 평가용역 및 실시설계용역 추진 : `22. ~ ◦ 용지보상 및 공사 추진 : `24. ~