2021. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

상수도사업소

목      차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축사업

◦ 상 수 도 공 기 업 의  안 정 적  재 정 확 충

◦ 마 을 상 수 도 정 비 사 업

◦ 광 역 상 수 도  마 을 권 사 업

◦ 농 어 촌 생 활 용 수 개 발 사 업

◦ 노 후 상 수 관 교 체 공 사

◦ 누 수 다 발 지 역  상 수 관로 교 체 공 사

◦ 월 락 정 수 장  현 대 화 전 면 개 량 사 업

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									김 형 준
수도경영담당					급 수 담 당							수도시설담당									누수방지담당
박 광 선					김 성 빈							안 용 운									정 병 욱
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	23	1	8	6	5	3	11 (청경2,공무9)
증 감	-	-	3	-	1	△4

□ 2021년 예산규모  : 37,766백만원

				＜2021 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2021년		2019년			증 감(%)
	합 계		37,766		36,016			1,750(4.8%)
	일반회계		9,601		9,731			△130(1.3%)
	특별회계		28,165		26,285			1,880(7.1%)

▷ 2021년 특별회계 : 28,165백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2021년		2020년			증 감(%)
	합 계			28,165		26,285			1,880(7.2%)
	자체수입			8,264		8,700			△436(5.0%)
	의존수입		국 비	11,201		8,815			2,386(27.1%)
			지원금	8,700		8,770			△70(0.8%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2021년		2020년			증 감(%)
	합 계			28,165		26,285			1,880(7.2%)
	사업비		소계	23,459		21,481			1,978(9.2%)
			투자사업	22,029		19,819			2,210(11.2%)
			경상사업	1,430		1,662			△232(14.0%)
	비사업		소계	4,706		4,804			△98(2.0%)
			행정운영	4,584		3,997			587(14.7%)
			예 비 비	122		807			△685(84.9%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’21. 5. 30. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
81,621	76,316	93.5	339	25,561	76.6

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,051㎞(도수․송수․배수관 560, 급수관 491)

◦ 배  수  지 : 9개소(27,250㎥)

◦ 가  압  장 : 41개소

◦ 감  압  변 : 32개소

◦ 검침급수전 : 28,483전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 마을상수도 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
71	42	29	5,425명 (3,428세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설: 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로                                 (단위:km)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,051	243	195	591	22	933	44	74
도수관	1	-	-	-	1	1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	544	226	2	297	19	516	13	16
급수관	491	7	191	291	2	404	29	57

2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진 ◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진 ◦ 맑은물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 교체사업 추진 ◦ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 추진

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 상반기 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 28백만원

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 170백만원(105전)

□ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진

◦ 월락정수장 개량사업 착공                            :‘19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업 1차분 준공                       :‘20. 4.

- 기존자재창고 및 완속여과지 철거, 수배전반 설치 등

◦ 월락정수장 개량사업 2차분 준공                       : `21. 5.

- 급속여과지 및 관리동 신설, 정수지 가시설공 등

◦ 월락정수장 개량사업 3차분 진행중(전체 공정률32%)     : `21. 4. ~

- 정수지 기초철근 배근 및 여과지 천장 면고르기 작업 등

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 주천 배촌·덕촌지구 상수도공사  ⇒  하수관거 사업과 병행추진 (공정률 15%)

◦ 주천 안곡지구 상수도공사  ⇒  하수관거 사업과 병행추진 (공정률 75%)

◦ 수지 고평지구상수도공사  ⇒  공정률 60%

◦ 아영 오산지구 상수도공사   ⇒  공정률 65%

□ 안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진

◦ 광역상수도 마을권(수지서당) 급수공사 완료

◦ 광역상수도 마을권(덕과월평) 급수공사 추진중 ⇒공정율 40%

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진중(18개 마을, 700가구)

◦ 마을상수도 정비사업 추진중(산내반선, 왕정동 시목동) ⇒공정율 40%

□ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 교체 사업 추진

◦ 상수도 재해복구사업 4개소(대산,대강,이백,송동) 완료 (L=2.7㎞)

◦ 긴급누수복구공사 완료 213개소, 노후 수도미터 교체 2,305전

◦ 노후 상수관 교체공사 추진중(4개소/L=4.2㎞)  ⇒ 전체 공정율 40%

- 도통초 주변, 노암1통, 오거리 주변, 향교지구

◦ 누수다발지역 상수관 개선공사 추진중 (3개소/L=4.8㎞) ⇒ 전체 공정율 90%

- 수지 남창, 송동신기, 주생 상동

□ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 추진

◦ 2021년도 사업대상지 선정                           :‘20. 3.

◦ 기본계획 확정 통보(전체 사업계획 확정)              :‘21. 2. 17.

◦ 스마트 관망관리 실시설계용역 착수                  :‘21.  3. 22.

	하반기 추진방향
◦ 상수도체납요금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확층 ◦ 월락정수장 개량사업 정수지,여과지 준공 및 시운전 ◦ 농촌지역 상수도 공급확대로 안정적인 생활용수공급 계속추진 ◦ 안정적인 광역상수도 및 마을권 급수 공급 지속 추진 ◦ 노후 상수관 교체 사업 조속 완료로 맑은 물 공급 확대 ◦ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 도입으로 수돗물 공급과정에 감시체계 구축

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

스마트 관망관리 인프라 구축사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2개년)

◦ 사업내용 : 정밀여과장치, 스마트 미터링, 소규모 유량·수압감시, 다항목 수질계측 장치, 자동 드레인 설비, 재염소 투입 설비 등

◦ 총사업비 : 52억원(국비 70%, 시비 30%)

- 2021년 : 31억원(국비 22, 시비 9)

□ 추진실적

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)	: `20. 1. ~ `21. 2.

◦ 2021년도 사업 대상지 선정	: `20. 3.

◦ 2021년 환경부 상수도 국고보조사업 예산 확정 내시    : `20. 12. 31.

◦ 기본계획 확정 통보(전체 사업계획 확정)	: `21. 2. 17.

◦ 실시설계용역 착수	: `21. 3. 22.

◦ 기 선정된 기관 벤치마킹 출장                        : `21. 5. 12.

- 금강유역본부(전주, 익산), 정읍권지사

□ 금후계획

◦ 기술별 사업 추진	: `21.  6. ~

- 재염소투입설비, 수질측정계측기, 자동드레인, 여과장치 등

◦ 실시설계용역 완료	: `21.  8.

상수도공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역	(단위:백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	전년대비
세 입	14,439	15,142	18,596	26,285	28,165	증 7.2%

☞ 2020년 대비 주요증감 요인(19억원 증)

- 월락정수장 현대화 전면 개량사업비 확보  : 106억원(‘20년 97억원 대비 9억원 증)

- 스마트 관망관리 인프라 구축 사업비 확보 : 18억원 증

- 공기업특별회계자본금전출 등	: △8억원 감

□ 추진실적

◦ 상반기 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보  : 28백만원

- 체납특별징수 기간 운영(1분기) : 단수조치 3건, 재산압류 2건

◦ 수도요금 징수내역                                   (단위 : 천원)

연도	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
2021년 5월	2,126,623	2,009,178	117,445	94.5%
과년도	523,829	404,616	119,213	77.2%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(105전)       : 170백만원

※ 공기업평가 : ‘19년도 “나등급” 으로 전북1위 선정(3년 연속)

□ 추진계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리 ⇒ 행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 예산절감 시책발굴을 통한 경영효율화 노력

마을상수도 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 71개소(마을상수도 42, 소규모급수시설 29)

◦ 사 업 량

- 신설(2개소) : 관정개발 및 이용시설공사, L=1.5㎞(산내 달궁, 내령)

- 정비(4개소) : 두수공 3식(산내 반선, 덕동, 원천), 관로개량(왕정동 시목동)

- 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

◦ 사 업 비 : 771백만원 (정비사업 571, 긴급복구 200)

- 예산 재원 : 정비사업 (도비 400, 시비 171) / 긴급복구 (시비 200)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12월(연중)

□ 추진실적

◦ 2021년 사업 계획 수립 및 실시설계용역 완료	: `20. 11. ~ ‘21. 3.

◦ 신설공사 (산내 달궁, 내령)

- 관정개발 완료 및 실시설계용역 추진	: ‘21.  4. ~

◦ 정비공사 (산내 반선, 왕정동 시목동)

- 실시설계용역 완료	: ‘21.  5. ~

□ 추진계획

◦ 마을상수도 신설 및 정비공사 추진 및 완료	: ‘21.  11.

- 신설(2개소) : 이용시설공사 추진(산내 달궁, 내령)

- 정비(4개소) : 두수공 3식(산내 반선, 덕동, 원천), 관로개량(왕정동 시목동)

◦ 누수 긴급복구 및 유지보수공사 추진(수시)       : ‘21.   1. ~ 12.

광역상수도 마을권 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치

- 급·배수관로(4개소) : 수지 서당, 덕과 월평, 향교 호치, 주생 도산

- 계량기설치(18개소)

◦ 사 업 량 : 급·배수관 4지구 L=2.5㎞, 계량기설치 700가구

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(관로공사 300, 계량기 설치 700 / 시비100%)

◦ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

□ 추진실적

◦ 수지서당 광역상수도 급수공사 완료                : `21.  4. 16.

◦ 덕과월평 광역상수도 급수공사 착공	: `21.  4. 26.

- 토공 및 관로공 추진  (공정률 40%)

◦ 마을권 계량기 설치공사 (14개마을)

-  주촌, 외용궁, 내용궁, 내기, 고촌, 회덕, 노치, 양촌, 진곡, 마륜, 오산, 상성, 하성, 구상마을

- 주민설명회 개최(14개 마을대표)	: `21.  3. ~ 4.

- 계량기 설치공사 추진	: `21.  5. ~

※ 하반기 4개마을(덕촌,배촌,안곡,호치) 계량기 설치공사 추진

□ 추진계획

◦ 광역상수도 급수공사 완료(3개소)                 : `21. 11.

- 향교 호치, 덕과 월평, 주생 도산

◦ 마을권 계량기 설치 공사 완료 (18개 마을)        : `21. 11.

농어촌생활용수 개발사업

(계속사업)

□ 현   황

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 아영면 일원,

◦ 사업지구 : 6개 지구, 24 마을

- 농촌생활용수 개발사업 14 마을, 자연방사성물질 검출지구 10마을

◦ 사업내용 : 배수관 매설 L=32.5㎞, 마을 지선관 매설 L=17.96㎞

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5개년)

◦ 총사업비 : 10,885백만원 (국비 1,668, 도비 5,951, 시비 3,266)

- 기투자액 : 5,892백만원 (국비 1,668, 도비 2,457 시비 1,767)

- ‘21년 사업비 : 4,156백만원 (도비 2,908, 시비 1,248)

- ‘이후 사업비 : 837백만원 (도비 586, 시비 251)

□ 추진실적

◦ 아영 오산지구 공사 추진중 (오산, 상성, 하성, 구상)         : ‘21. 3. ~

- 배수관 매설완료, 임시 포장추진 (공정률 65%)

◦ 수지 고평지구 공사 추진중 (양촌, 고정, 진곡, 마륜)         : ‘21. 3. ~

- 배수관 매설완료, 임시 포장추진 (공정률 60%)

◦ 주천 안곡지구 (자연방사성물질 검출지구)                   : ‘21. 3. ~

- 배수관 매설추진 중 (공정률 75%)

◦ 주천 배촌, 덕촌지구 (자연방사성물질 검출지구)             : ‘21. 4. ~

- 도 원가심사 완료, 관로 터파기 추진  (공정률 15%)

□ 금후계획

◦ 3개 지구 공사 완료                                    : ‘21.  9.

- 아영 오산지구, 수지 고평지구, 주천 안곡지구

◦ 주천 배촌, 덕촌지구 공사 완료                          : ‘21. 12.

노후 상수관 교체공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 135㎞

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2021년	2022년 이후	비 고
22,000	18,586	1,800	1,614

□ 추진실적

◦‘20년 까지 노후 상수관 교체 : L=109㎞ (80.7%) [`20년 7.8㎞]

(동지역 71.8㎞, 타 공사 병행 24.2㎞, 타 부서 시행 13㎞)

◦ `21년 노후 상수관 교체 공사 시행 8개소(L=6.9㎞)

- 도통초 주변(1.2㎞), 향교지구(1.1㎞), 재해복구사업 4개소(2.7㎞), 노암1통(1.1㎞), 오거리 주변(0.8㎞)

· 향교지구 공사 착공	: `21. 3. 12.

- 상수관 매설 및 임시포장 추진 (공정률 60%)

· 도통초 주변 공사 착공	: `21. 4. 22.

- 상수관 매설 및 임시포장 추진 (공정률 50%)

· 오거리 주변 공사 착공	: `21. 5. 13.

- 통학로 지중화 사업과 병행추진

· 노암 1통 공사 착공                             :‘21. 5.

- 하수관거사업, 도시가스 사업과 병행추진

· 재해복구사업 4개소(대산,대강,이백,송동) 완료     :‘21. 6

□ 금후계획

◦ 향교지구, 도통초 주변 공사 완료	: `21. 6.

◦ 오거리 주변, 노암 1통 공사 완료	: `21. 10.

누수다발지역 상수관로 개선공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역(읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2022년(9년)

◦ 사업규모 : 누수 발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 / L=56.0㎞

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2021년	2022년 이후	비 고
8,230	7,360	500	370

□ 추진실적

◦‘20년 까지 관로 교체 : L=47.1㎞ (84.1%) [20년 5.3㎞]

- 읍·면지역 30.6㎞(이백면 외 6개소), 동지역 16.5㎞(왕정동 외 5개소)

◦ `21년 누수다발지역 상수관 개선 공사 시행 2개소

- 수지 남창(2.6㎞), 송동 신기(1.1㎞)

· 수지 남창 공사 착공	: `21. 2. 5.

· 송동 신기 공사 착공	: `21. 4. 6.

◦ 주생 상동(1.1㎞ / `20년 시행) 공사 재착공	: `21. 2. 25.

◦ 수지 남창, 송동 신기, 주생 상동 공사 완료	: `21. 6.

□ 금후계획

◦ `22년 사업 대상지(송동 안계) 실시설계용역 시행	: `21. 10. ~ 12.

월락정수장 현대화 전면개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5개년)

◦ 총사업비 : 325억원(국비 162.5, 도비32.5 시비 130)

(단위:백만원)

구분	계	19년까지	2020년	2021년	2022년 이후	비고
합계	32,500	2,434	9,738	10,554	9,774
국비	16,250	1,217	4,869	5,277	4,887
도비	3,250	243	974	1,055	978
시비	13,000	974	3,895	4,222	3,909

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업 착공                            :‘19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 준공	: `20. 4.

- 1차분 사업내용 : 기존자재창고 및 완속여과지 철거, 수배전반 설치 등

◦ 여과지 배관·구조물공, 관리동 신설 및 입주             :‘20. 9.

◦ 월락정수장 개량사업(2차분) 준공                        :‘21. 5.

- 2차분 사업내용 : 급속여과지 및 관리동 신설, 정수지 가시설공 등

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 진행중(전체 공정률 35%)     : `21. 4.~

- 정수지 기초철근 배근 및 여과지 천장 면고르기 작업 등

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 공사 추진 기간동안 급수 체계 유지로 제한급수 등 단수 대응

□ 정수장 내 기존·가설·신설관로 철거 및 연결 마다 한국수자원공사,           한국농어촌공사와 지속 협의 체계 유지

□ 금후계획

◦ 정수지,여과지 준공완료 및 시운전 실시	: `21. 10.

※ 후 기존 시설물과 연계운영 (기존침전지↔신설여과지·정수지)

◦ 취수펌프장, 응집침전지, 착수정 완료	: `22. 12.

◦ 전체공사 준공