2021. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

문 화 예 술 과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 남원 미술 에듀센터 건립

◦ 남원시립김병종미술관 운영

◦ 안숙선명창의 여정 운영

◦ 남원아트센터 운영

◦ 남원시립어린이국악단 창단 및 운영

◦ 정자나무 마을음악회

◦ 복합형 공공도서관 건립

◦ 가야고분군 세계유산 등재

◦ 남원읍성 복원정비

◦ 기문가야 홍보관 건립

◦ 문화재 국가‧도지정 추진

◦ 지정문화재 보수 및 보호관리

◦ 향토문화유산 지정 관리

◦ 가야고분군 정비와 가야문화 인식확대

◦ 문화재 활용 공모사업

◦ 공공도서관 운영

□ 시정질문·5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

										문화예술과장
										박 승 용
문화예술담당					국악진흥담당						문화재담당								문화시설담당						도서관운영담당
김 은 영					서 실 교						정 환 석								김 창 주						김 영 미
□문화예술단체육성․지원 □문학관․김병종미술관 운영 □남원아트센터 운영 □남원시립합창단 운영					□국악 보존․육성 □남원시립국악단․농악단 운영 □안숙선명창의여정 운영 □국악의성지․소리체험관 운영						□가야문화유산 조사․연구 □국가․도지정문화재 관리․보수 □전통사찰 관리 보수 □문화재 전승 사업								□문화재 활용사업 □ 미술예듀센터, 공공도서관 등 건립 □문화시설 보수정비						□시립도서관 운영 관리 □어린이청소년도서관 운영․관리 □작은도서관 운영․관리 □도서관 관련 공모사업

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	26	1	5	7	5	6	2
현 원	24	1	11	2	3	7
증 감	△2	-	6	△5	△2	1	△2

※ 청경 4명, 임기제 5명, 공무직 13명

2021년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 국‧도 공모사업 선정 및 추진 : 방방곡곡 문화공감외 7건 1,099백만원 ◦ 가야고분군 유네스코 세계유산 등재신청서 완성도 검사 통과 ◦ 21~22년 한국인이 꼭 가봐야 할 한국 관광 100선 선정 (남원시립김병종미술관)

□ 코로나19와 함께하는 생활 속 문화향유 활성화

◦ 남원시립김병종미술관 비대면 「미술관 집콕놀이」 및 기획전시「상춘곡」

◦ 철저한 방역 지침을 준수한 문화저변 확대 사업 추진

-어린이청소년 국악교실(10회), 명예소리꾼 강좌(5회), 한옥자원활용 상설공연(1회)

◦ 책 읽는 남원, 독서문화 환경 조성을 위한 다양한 시책 추진

-책값돌려주기(552권), 작은도서관 신규조성(1개소), 순회사서 지원(1명)

□ 가야고분군 세계유산 등재 추진 및 문화유산 보존전승

◦ 가야고분군 유네스코 세계유산 등재신청서 완성도 검사 통과

◦ 남원읍성 디지털 마스터플랜 용역 진행

◦ 도지정문화재(3건) 지정 완료 및 남원시 향토문화유산(7건) 추가지정

□ 문화 기반시설

◦ 복합형 공공도서관 도시계획 시설변경, 토지매입, 건축 설계공모 추진

◦ 남원읍성 정비계획 용역 및 디지털 마스터플랜 작성 용역 추진

◦ 기문가야 홍보관 기본구상 및 도시계획시설 결정 용역 추진

	하반기 추진방향
◦ 가야고분군 세계유산 등재를 위한 유네스코 현지실사 조사 대응 철저 ◦ 복합형 공공도서관 건축 설계공모 선정 및 건축 설계 ◦ 문화(관광)재단 타당성검토 용역 ◦ 남원아트센터 활성화를 위한 민간위탁 추진 ◦ 코로나19이후 시민의 문화 향유 증진 주력 - 정자나무 마을음악회, 한옥자원활용 야간 상설공연, 문화재 야행 등

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

남원 미술 에듀센터 건립

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022년

◦ 사업위치 : 남원시 어현동 774 (887㎡), 775(758㎡)

◦ 사업규모 : 990㎡ (지상 2층, 지하 1층)

◦ 사업목적

- 가족 단위 관람객들이 이용할 수 있는 교육 및 체험프로그램 진행

- 기획전시, 소장품, 지역 미술 연계 프로그램 개발 및 운영

- 디지털전시실을 활용한 4차 뉴미디어(AR, VR 등) 전시 기획

◦ 주요시설 : 다목적실, 세미나실, 디지털전시실, 수장고 등

◦ 총사업비 : 3,000백만원 (도비 2,025 시비 975)

-  ̀21년 사업비 : 1,300백만원 (도비 975, 시비 325)

-  ̀22년 사업비 : 1,700백만원 (도비 1,050, 시비 650)

□ 위 치 도

에듀센터 건립 예정지	주변 시설

□ 금후계획

◦ 건축설계 용역 계약                               :  ̀21. 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 완료                       :  ̀21. 9.

◦ 건축 공사 발주                                   :  ̀21. 10.

남원시립김병종미술관 운영

□ 개    요

◦ 위     치 : 남원시 함파우길 65-14

◦ 주요 시설 : 갤러리 1~3, 북카페, 수장고, 사무실, 선큰가든 등

◦ 시설 규모 : 부지 8,059㎡, 건물 1,442㎡(지상 2층)

□ 추진실적

◦ 2021년 관람객 수: 26,773명

2020년
1월	2월	3월	4월	5월	소계
5,098	3,471	휴관	휴관	3,525	12,094

2021년(5/12기준)
1월	2월	3월	4월	5월	소계
2,535	6,939	7,179	6,459	3,661	26,773

◦ 21~22년 한국인이 꼭 가봐야 할 한국 관광 100선 선정(한국관광공사)

◦ 기획전시 <Dialogue, 상춘곡(賞春曲)>         :  ̀21. 2. 9. ~ 5. 30.

◦ ‘미술관 집콕놀이’ 체험교육프로그램(9회)     :  ̀21. 3월 ~

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19 확산 방지를 위한 대책 마련 필요

□ 철저한 관람 수칙 준수 : 발열체크, 마스크 착용, 전시해설 미실시 등

□ 전시 및 교육 : 단체관람 불가, 1m 거리 유지, 교육 참여인원 최소 접수

※ 미술관 동시 입장 관람객 수 : 150명

□ 금후계획

◦ 기획전시 <김병종 기증작품 특별전Ⅲ “생명의 숲”>  :  ̀21. 6. 8. ~ 10. 17.

◦ 제3회 청소년 진로 아트캠프                    :  ̀21. 8. 6. ~ 8. 22.

안숙선명창의 여정 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 전북 남원시 광한북로 20 (남원예촌 2지구 내)

◦ 총사업비 : 4,550백만원(국비 1,500, 도비 1,350, 시비 1,700)

◦ 면    적 : 부지 5,832㎡, 건물 2동 603.72㎡

◦ 주요시설 : 전시관, 전수관, 물품보관실, 연습실. 사무실 등

◦ 운영인력 : 3명 / 시간선택제 1, 공무직 1, 기간제(청소) 1

□ 추진실적

◦ 어린이․청소년 국악교실 운영               : 4월 ~ 12월 / 주2회

◦□명예 소리꾼□판소리 강좌 운영           : 4월 ~ 12월 / 주1회

- 유관기관 및 남원시청 5급이상 공무원

◦ 안숙선명창의 소장품 주제별 상설 전시

◦ 디지털 아트 실감콘텐츠 체험관 운영

◦ 시립국악단 한옥자원활용 야간 상설공연    : 5월 ~ 9월(매주 토요일)

□ 쟁점 및 대책

◦ 전시관 음향장비가 외부에 미설치되어 관광객에게 홍보 미흡

□ 하반기 추경예산에 반영하여 확보

□ 금후계획

◦ 남원출신 명인․명창 특별 공연 관련 협의                  : 9월중

◦ 안숙선 명창 무형문화재 공개발표회                      : 10월중

◦ 어린이·청소년 국악교실 및□명예 소리꾼 작품 발표회    : 12월중

남원아트센터 운영

□ 개    요

◦ 위 치 : 남원시 만인로 92 (구. KBS방송국)

◦ 규 모 : 본관(지하 1층, 지상 3층), 연면적 4,315㎡, 부지면적 10,970㎡

◦ 운영목적

- 공연․전시․문화교육 및 체험을 위한 지역문화예술공간 조성으로

시민의 문화예술 향유증진 및 지역문화예술 진흥에 기여

◦ 운영방식 : 민간위탁

- 민간 전문성‧능률성‧자율성 도입, 탄력적 인력운영 장점

- 민간위탁심의위원회를 통한 주요사업별 프로그램 제안 심사

◦ 중점 추진사업분야

- 문화 접점 : 시민 및 관광객의 문화체험 확대사업

- 문화 교육 : 청소년 및 시민 대상 문화예술 기초 교육

- 문화 거점 : 예술단체 및 문화시설과의 연계성 강화 사업

□ 추진실적

◦ 아트센터 프로그램 운영                        :  ̀20. 10. ~ 11.

- 도시재생 대학 프로그램 운영(축제기획, 축제엔지니어링, 공공디자인, 도시재생 콜로키움)

◦ 공공미술 프로젝트 작품 설치․전시               :  ̀21. 1. ~ (상시)

□ 금후계획

◦ 의회 민간위탁 동의안 상정	:  ̀21. 7월

◦ 남원아트센터 운영 예산 확보	:  ̀21. 7월

◦「남원시아트센터 관리 및 운영 조례」개정	:  ̀21. 9월

◦ 민간위탁 수탁사 모집공고 및 선정	:  ̀21. 9월 ~ 10월

◦ 세부운영계획 수립 및 개관준비	:  ̀21. 11월 ~ 12월

◦ 아트센터 프로그램 운영 및 개관식(※코로나19 고려)	:  ̀21. 12월

남원시립어린이국악단 창단 및 운영

□ 개    요

◦ 구    성 : 어린이국악단원 20명 이내(판소리 분야) / 지도교사 3인

◦ 단원자격 : 관내 초·중학교 재학생

◦ 세부추진 운영 계획

구 분	세 부 내 용
체계적인 교육 시스템 구축	1. 주간 정기 연습 진행 -주 2회(수,금) / 회당 2시간 수업운영 -단원수준 및 공연일정에 맞는 프로그램 재편성(3개월마다) 2. 방학 특별 연습 진행 -국악캠프 및 특별 강연 진행 (2주이내)
정기적인 공연 기회 제공	1. 시립국악단 상설 공연 및 기획공연 참여 (합동공연, 아역출연 등) 2. 어린이국악단 정기공연 및 지역 축제 등 행사 참여

□ 추진실적

◦ 시립어린이국악단 지도교사 위촉(3명)        :  ̀21. 4. 9.

◦ 시립어린이국악단원 위촉(6명)	:  ̀21. 4. 21.

◦ 주간 강습 시작                            :  ̀21. 4. 28.

◦ 시립어린이국악단원 추가(수시) 모집         :  ̀21. 5. 10. ~ 12. 31.

□ 금후계획

◦ 방학 중 특별 강습 진행                    :  ̀21. 8월중

정자나무 마을음악회

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 정자나무 마을음악회

◦ 기    간 :  ̀21. 9 ~ 12월(약 10회)

◦ 장    소 : 읍·면 단위 마을(장소 예 : 마을정자, 마을회관 등)

◦ 공연내용 : 국악(판소리, 기악합주, 퓨전국악, 무용 등), 농악(남원농악)

◦ 공연주관 : 남원시립국악단 / 남원시립농악단

◦ 운영계획

- 1개 읍·면 1개 마을 선정하여 운영

※ 수요가 많을 경우 확대 운영 검토

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19 확산 방지를 위한 대책 마련 필요

□ 발열체크, 마스크착용, 객석 거리두기 등

※ 사회적 거리두기 2단계 이상 유지시에는 공연 취소

□ 금후계획

◦ 읍·면 마을 신청 접수 및 선정                 :  ̀21. 7월중

◦ 공연 프로그램 계획 및 사전연습                :  ̀21. 8월중

◦ 공연 진행                                     :  ̀21. 9.~ 12.

복합형 공공도서관 건립

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 금동 343-8 외

◦ 사업기간 :  ̀21년 ~  ̀23년 (3년)

◦ 총사업비 : 118억원 (균특 59, 시비 59)  ※ 부지 매입비 별도

◦ 사업내용 : 복합형 공공도서관 건립 (연면적 3,325㎡ 정도)

- 공공도서관(서가, 열람실 등) + 생활문화센터(동아리실, 다목적공간 등)

□ 추진실적

《행정절차》

◦ 공공도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 :  ̀20. 3. ~  ̀20. 11.

◦ 공유재산 관리계획 의결, 재정투자심사 승인       :  ̀20. 11.

◦ 도서관 건립부지(남원초) 도시계획 시설변경       :  ̀21. 1. ~  ̀21. 5.

◦ 도서관 건립부지 토지 매입 추진(보상공고 등)     :  ̀21. 4. ~

《건축설계》

◦ 공공건축 사업계획 사전검토(건축공간연구원)      :  ̀21. 1. ~  ̀21. 3.

◦ 도 원가심사 및 시 일상감사                     :  ̀21. 4.

◦ 공공건축 건축 심의                             :  ̀21. 4. 16.

◦ 건축 설계공모 공고                             :  ̀21. 4. 30.

□ 금후계획

◦ 도서관 건립부지 토지 매입 및 공부정리          :  ̀21. 5. ~  ̀21. 6.

◦ 건축 설계공모 당선작 선정                      :  ̀21. 7. 7.

◦ 건축 설계용역                                  :  ̀21. 7. ~  ̀22. 1.

◦ 도서관 건립 공사 착공                          :  ̀22. 2. ~

가야고분군 세계유산 등재

□ 개    요

◦ 문화재명 : 남원 유곡리와 두락리 고분군(사적 제542호- ́18.3.28지정)

◦ 위    치 : 인월면 유곡리 746-1번지 일원(98,225㎡)

※ 세계유산 등재대상 가야고분군(7개 지역)

- 유곡리와 두락리 고분군, 경남 김해 대성동, 경남 함안 말이산, 경남 합천 옥전,

경남 고성 송학동, 경남 창녕 교동과 송현동, 경북 고령 지산동

□ 추진실적

◦ 가야고분군 세계유산 등재 추진대상 선정               : ΄18. 5. 14.

◦ 가야고분군 세계유산 등재 추진 업무협약 체결           : ΄18. 11. 30.

◦ 유네스코 세계유산 등재 잠정목록 확정                  : ΄19. 1. 30.

◦ 유네스코 세계유산 등재신청 대상 최종 선정           : ΄20. 9. 10.

◦ 등재신청서 완성 및 제출(문화재청→세계유산센터)       : ΄21. 1. 27.

◦ 가야고분군 유네스코 세계유산 등재신청서 완성도 검사 통과   : ΄21. 3. 5.

□ 금후계획

◦ 현지실사 대응 예비실사(3회 – 추진단, 지자체)          : ΄21. 5. ~ 7.

◦ 유네스코 현지실사 조사(최대2인/1주일)                : ΄21. 7.~ 9.

- 유산과 관련한 구체적인 질의 예상됨에 따라 전담인력활용 대응

◦ 세계유산 패널회의 2회(프랑스,국제기념물협회)	: ΄21. 11.~΄22. 3.

◦ 패널회의 결과 통보(국제기념물협회→세계유산위원회)    : ΄22. 5.

◦ 세계유산위원회 등재 결정(등재,보류,반려,불가)	: ΄22. 7.3.

남원읍성 복원정비

□ 개    요

◦ 문화재명 : 남원읍성(사적 제298호 / ́82.11.03. 지정)

◦ 위    치 : 남원시 동충동 364-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2025년 (10년)

◦ 총사업비 : 330억원(국비 231, 도비 49.5, 시비 49.5)

◦ 사업내용 : 전체 3.4km 중 북문과 북성벽 약 600m 구간 복원정비

◦ 총 면 적 : 96필지 33,405㎡(국․공유지 88필지 32,515㎡, 사유지 8필지 890㎡)

□ 추진실적

◦ 광복 70주년 일제강점기 문화재 복원 프로젝트 선정	: ΄15.  8. 15.

◦ 남원읍성 종합정비계획 용역 추진(우석대학교)	: ΄16. 12. 20.

◦ 남원읍성 북문지 및 북성벽 일부 발굴조사	: ΄18. ~ ΄20.

◦ 사적추가지정(1차~4차)	: ΄15. ~ ΄21.

◦ 사적지 토지매입 진행중	: ΄19. ~ ΄21.

◦ 남원읍성(사적구역) 정비계획 용역추진중	: ΄20. 5.~

◦ 디지털 마스터플랜 작성 용역 진행	: `21. 5.~

□ 금후계획

◦ 남원읍성(사적구역) 정비계획 용역완료	: ΄21. 6.

◦ 사적추가지정 토지매입 완료 구간 전문가 자문 후 철거 실시	: ΄21. 6. ~

◦ 북성문 및 북성벽 고증연구 추진	: ΄21. 6. ~

기문가야 홍보관 건립

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면 유곡리 1127-6 (유곡리와 두락리 고분군 일원)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3년)

◦ 사업내용 : 기문가야 홍보관 건립(부지면적 6,000㎡, 연면적 300㎡)

- 전시실, 디지털자료실(AR,VR,MR), 체험문화센터(토기제작), 야외전시관, 주차장 및 유적 진입로 정비 등

◦ 연도별 투자계획                                     (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	투자계획
		2021년	2022년	2023년
총사업비	4,500	550	1,450	2,500
균 이	3,300	375	1,050	1,875
시 비	1,200	175	400	625

□ 추진실적

◦ 홍보관 건립 기본구상 및 도시계획시설 결정 용역 시행  : ΄21. 1. ~

- 건립부지 선정 시 주민 설명회를 통해 의견수렴

- 건립부지 입지분석, 기능 및 규모 타당성 조사

□ 금후계획

◦ 기문가야 홍보관 건립부지 매입 추진                    : ΄22. 2. ~

◦ 기문가야 홍보관 건립 실시설계용역 시행                : ΄22. 2. ~

◦ 매장문화재 시·발굴조사 진행                          : ΄22. 3. ~

◦ 기문가야 홍보관 공사 시행                             : ΄22. 8. ~

문화재 국가․도지정 추진

□ 개요 및 추진실적

◦ 추진대상 : 10건 (지정 3건 완료, 추진중 7)

구분	명 칭	지 정	추 진 상 황	비고
도 (유형)	양대사마실기 목판	도 유형문화재 (2021.1.22.)	◦ 도 유형문화재 제274호 지정	완료
	만복사지 석조인왕상	도 유형문화재 (2021.4.30.)	◦ 도 유형문화재 제280호 지정	완료
도 (기념물)	청계리 고분군	도 기념물 (2020.12.28.)	◦ 도 기념물 제145호 지정	완료
국가 (국보)	남원 광한루	보물 281호 (1963.1.21.)	◦ 국보 지정 신청(΄18.3.28./΄20.5.8.) ◦ 도 문화재위원회 심의(΄20.5.12.- 조건부 가결) - 연혁 및 관련 문헌 등 역사적 규명 자료 보완 - 문화재위원 자료 보완 및 도 협의 후 제출	추진중
국가 (보물)	대복사 동종	도 유형 24호 (1973.6.23.)	◦ 보물 지정 신청(΄20.9.29.) ◦ 문화재위원회 현지실사(΄21.1.12.) ◦ 도 문화재위원회 심의(`21.2.19.-보류) - 전문가 의견 추가 및 과학적분석 추가 필요	추진중
	실상사 편운화상탑	도 유형 247 (2017.3.31.)	◦ 보물 승격을 위한 학술대회 개최(΄20.7.23.) ◦ 보물 지정 신청(΄21.3.8.) - 현지실사후 위원회 개최 예정	추진중
국가 (사적)	남 원 교룡산성	도 기념물 9호 (1973.6.23.)	◦ 사적 지정 신청을 위한 발굴조사 추진 - 군기고터 주변 정비 및 시굴조사 완료 - 북문지 집수정 발굴조사 완료 - 성벽 조사 및 학술대회 후 승격 신청	추진중
	남 원 아막성	도 기념물 38호 (1977.12.31.)	◦ 사적 지정 신청을 위한 발굴조사 추진 - 아막성 발굴조사 추진중(΄19.12.~) - 학술대회 후 승격 신청	추진중
도 (유형)	남원향교 명륜당		◦ 유형문화재 지정신청(΄21.3.8.) - 현지실사후 위원회 개최 예정	추진중
	남원향교 진강루		◦ 유형문화재 지정신청(΄21.3.8.) - 현지실사후 위원회 개최 예정	추진중

※ 보절 성시리산성 지표 및 시굴조사 완료	: ΄21. 3. 1.

- 성시리 산성 긴급발굴조사(국비 확보) 실시	: `21. 5. ~

□ 금후계획

◦ (국가지정) 학술대회 등 보완후 승격 추진

◦ (도지정) 현지실사 및 문화재위원회 개최후 문화재 지정

지정문화재 보수 및 보호관리

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월

◦ 지정문화재 보수정비

- 국   가   지  정 : 10건 1,545백만원 (국 981.5, 도 281.75, 시 281.75)

- 도     지    정 : 15건 1,510백만원 (도 755, 시 755)

- 문화재 재난안전 : 2건 55.5백만원 (국 38.85, 도 4.99, 시 11.66)

◦ 전통사찰 보수·방재

- 보   수   정   비 :  2건 600백만원 (국 300, 도 120, 시 120, 자부담 60)

- 방재시스템 구    축 :  1건 265백만원 (국 132.5, 도 53, 시 53, 자부담 26.5)

- 방재시스템 유지보수 : 14건 109.6백만원 (국 54.8, 도 27.4, 시 27.4)

※ 문화재 현황

◦ 지정문화재 : 총131점

- 국가지정 : 41점(국보 1, 보물 26, 사적 6, 명승 1, 국가민속 3, 천연 2, 무형 2)

- 도 지 정 : 86점(유형 38, 기념물 9, 민속 5, 무형 5, 문화재자료 29)

- 향토문화유산 : 유형 4점

◦ 전통사찰 현황 : 15개소

◦ 비 지정문화재 : 312개소(효열비 154, 건조물 120, 기타 38)

□ 추진실적

◦ 문화재 보존관리

- 문화재 보존검토 : 약700건

- 자연문화 유산 민속행사 : 2건(지리산 천년송, 진기리 느티나무)

◦ 문화재 보수정비 : 27건(완료 1건, 공사중 18, 용역중 4, 설계중 3, 토지매입 1)

◦ 전통사찰 보수·방재사업 : 17건(공사중 15, 설계중 2)

□ 금후계획

◦ 문화재 보수정비 착공 및 사업완료                   : ΄21. 5. ~ 12.

◦ 문화재 현상변경 허가 및 복합민원 협의              : ΄21. 1. ~ 12.

향토문화유산 지정 관리

□ 개    요

◦ 비지정 문화재 현황 : 312개소(효열비 154, 건조물 120, 기타 38)

	< 향토문화유산 위원회 현황 >
◦ 근 거 : 남원시 향토문화유산 보호 조례 제3조, 제4조 ◦ 구 성 : 11명 (위원장 1, 위원 10) ◦ 임 기 : 2020. 6. 1. ~ 2022. 5. 31. (2년) ◦ 심의사항 : 문화유산 조사, 지정·인정과 해제, 보호구역 지정,해제,관리 등에 관한 사항 등 ※ 고고학, 고건축, 고문서, 한국사, 고미술, 보존, 미술사, 민속, 무형, 향토사 등 분야별 전문가로 구성

□ 추진실적

◦ 남원시 향토문화유산 심의위원회 구성	: ΄20. 6. 1.

◦ 향토문화유산 심의위원회 개최	: ΄20. 11. 9.

◦ 향토문화유산 지정 예고	: ΄20. 12. 11.

◦ 향토문화유산 유형문화재 4건 지정	:  ́21. 1. 15.

◦ `21년 상반기 향토문화유산 지정신청 공고 및 접수	:  ́21. 2. ~ 3.

- 접수 4건(영사정, 사제실기 목판, 비례목판, 조경남 장군 묘역), 발굴 3건(석조불상)

◦ 관계전문가 현지조사 및 자문	:  ́21. 4 ~ 5.

□ 금후계획

◦ 향토문화유산 심의위원회 개최	:  ́21. 6.

◦ 지정 향토문화유산 도지정문화재 승격추진(신청)	:  ́21. 9.

◦ 향토문화유산 하반기 신청공고	:  ́21. 9.

가야고분군 정비와 가야문화 인식확대

□ 개    요

◦ 유 적 명 : 남원 유곡리와 두락리 고분군

◦ 위    치 : 남원시 인월면 유곡리 산746-1번지 일원

◦ 지정사항 : 국가지정문화재 사적 제542호 (2018.3.28.)

◦ 규    모 : 고분 40기 / 문화재구역 40필지 (98,225㎡)

□ 추진실적

◦ 발굴 : 15호, 16호, 17호 ,32호, 36호, 30호(발굴중-완주문화재연구소)

※ 수혈식석곽묘 6기, 횡혈식석실분 1기, 청동거울, 금동신발 등 출토

◦ 유곡리와 두락리 고분군 정밀지표조사(고분 40기 확인)   : ΄11. 12.

◦ 유곡리와 두락리 고분군 종합정비계획 수립중            : ΄20. 12.~

◦ 토지매입 : 38필지(97,743㎡) 매입(99.5%)/잔여 2필지는 ΄21년 매입계획

◦ 고분군 주변정비사업 시행                             : ΄20. 12.~

- 시·발굴지, 수목정비, 탐방로 이설, 문화재 안내판 설치 등

◦ 유곡리와 두락리 고분군 교육 및 홍보사업 추진         : ΄21. 2.~

- 시민강좌 개최, 홍보영상 송출(전광판, 아파트 광고모니터)

□ 금후계획

◦ 체계적인 관리방안을 수립하여 지속적인 고분군 정비사업 추진

◦ 문화재구역 확대지정 추진(등재신청서의 유산구역과 동일한 범위 설정)

◦ 가야고분군세계유산등재추진단과 연계하여 교육 및 홍보 추진

문화재 활용 공모사업

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 2월 ~ 12월

◦ 총사업비 : 665백만원(국비 266, 도비 119.7, 시비 279.3)

◦ 사업내용                                            (단위 : 백만원)

연번	사 업 명	대상 문화재	사 업 비				비고
			계 (100%)	국 (40%)	도 (18%)	시 (42%)
계			665.0	266.0	119.7	279.3
1	향교‧서원 문화재 활용	남원향교	75.0	30.0	13.5	31.5
2	전통산사 문화재 활용	실상사	55.0	22.0	9.9	23.1
3	문화재 야행	광한루원 일원	300.0	120.0	54.0	126.0
4	고택‧종갓집 활용	죽산박씨 종가, 몽심재	180.0	72.0	32.4	75.6
5	생생문화재	황산대첩비지 유곡리두락리 고분군	55.0	22.0	9.9	23.1

□ 추진실적

◦ 2021년 문화재청 공모사업 선정                :  ̀20. 9.

◦ 보조금 교부결정(문화재청•전북도→시)          :  ̀21. 3.

◦ 보조금 교부 신청(보조사업자)                    :  ̀21. 4.

◦ 보조금 교부결정 및 지급 완료                   :  ̀21. 4.

□ 쟁점 및 대책

◦ 코로나19 확산 지속에 따라 축제행사성 프로그램 운영 어려움

- 코로나19 상황 이후로 일정 조정 및 일부 비대면(온라인) 방식 진행

※ 문화재 야행 계획(안) : 오프라인 10. 1. ~ 3.(예정) / 온라인 별도

□ 금후계획

◦ 문화재 활용사업 추진                         :  ̀21. 5. ~ 12.

공공도서관 운영

□ 도서관 현황                              (2021.5.13.기준)

구 분	위 치	규 모	장서보유	대출권수 (일평균)	이용자수 (일평균)	시설년도	비 고
시립도서관	죽항동	1,046㎡ (2층)	63,684권	72권	78명	2008~ 2009년	2020. 3. 10. 리모델링 완료
어린이청소년도서관	도통동	1,454㎡ (3층)	27,500권 (장난감 694개)	143권 (장난감8건)	61명	2019년	2019.7.25.개관
작은도서관	28개관( 공립 14, 사립 14) ※ 향교동작은도서관(공립) 개관 : ‘21. 3.

□ 추진실적

◦ 공공도서관 ‘책값 돌려주기’(시책) 추진                 :  ̀21. 1. ~

⇒ 322명 / 552권 / 7,514천원(남원사랑상품권) 지급

◦ 어린이청소년도서관 ｢문화가 있는 날｣ 독서프로그램 운영    :  ̀21. 2. ~

⇒“어린이 북아트”, 초등학생 149명 참여

◦ 독서 소외계층을 위한 ‘책 배달 서비스’시행            :  ̀21. 4. ~

◦ 어린이청소년도서관 ｢길 위의 인문학｣ 선정·프로그램 운영    :  ̀21. 5.  ~

◦ 도서관 카카오톡 채널 플랫폼을 활용한 플러스 친구 운영     :  ̀21. 5. ~

◦『공모사업』생활SOC 작은도서관 신규 조성 및 운영지원

⇒ 작은도서관 조성 : 1개소, 100백만원(국비 70, 시비 30) / 향교동작은도서관

◦ 전문 순회사서(1명) 지원 – 이그린, 향교동, 좋은열매 작은도서관

□ 금후계획

◦ 독서문화진흥을 위한 프로그램 및 시책 사업 추진         :  ̀21. 1. ~

⇒ 책값 돌려주기, 책 배달 서비스, ｢북스타트｣, ｢길 위의 인문학｣ 등

◦ 비대면 디지털도서관 (QR 북라이브 시스템 등) 구축       :  ̀21. 5. ~

◦ 작은도서관 상반기 운영실태 점검 및 하반기 보조금 교부   :  ̀21. 6. ~

◦ 공공도서관 「독서의 달」행사 추진                       :  ̀21. 9. ~

□ 시정질문 추진상황

질문일자 : 2020. 11. 27. (제240회)		질문의원 : 최형규 의원
질문내용	남원시 국도비 확보 주요시설물 관련 질문
◦ 공공시설 준공후 당초목적과 방향이 다르게 운영중인 사업이 있는가? ◦ 국가예산확보를 통해 조성된 시설이 지역경제 활성화와 시민의 삶의 질 향상에 어떠한 영향을 주었는가? ◦ 공공시설의 효율적인 관리를 위한 남원시의 노력은?
답변내용
◦ 시립김병종미술관과 함파우소리체험관은 시민의 삶의 질 향상과 남원좌도 농악을 보전‧전수하려는 당초 목적에 맞게 충실히 운영하고 있음 ◦ 시립김병종미술관은 개관(2018년)이래 매년 4~5회의 기획전시 및 지역 작가의 참여 전시도 개최중으로, 한국관광 100선에 선정되어 많은 관람객이 찾고 있어 지역경제 활성화에도 기여하고 있으며, 함파우소리체험관은 매년 많은 이용자를 확보하고 있으며, 국가무형문화재 제11-8호로 지정, 남원농악의 우수한 문화자원으로 자리매김하고 있음 ◦ 시립김병종미술관은 공모전시, 공립기관 무상대여전시, 소장품 전시 등을 통해 작품 대여비를 최소화해 비용절감에 노력하고 있으며, 함파우소리체험관은 개관(2016년)이래 시설은 안정화되어 비용은 줄고, 운영 수입은 크게 증가하는 추세를 보이고 있었으며, 코로나19 이후에는 이전 추세를 회복할 것으로 판단하고 있음

질문일자 : 2020. 11. 27. (제240회)		질문의원 : 이미선 의원
질문내용	공공조형물 건립 관리체계 부실에 대한 향후 대책 및 활용방안
◦ 남원시의 도시가치를 높이고 지속가능한 도시브랜드를 만들어가기 위해 공공조형물 관리 상황을 개선할 것
답변내용
◦ 남원시 공공조형물 전수조사후 공공조형물 대장 작성 및 「공공조형물 관리조례」제정을 통해 남원시의 공공조형물을 효과적을 관리하도록 노력하겠음
추진상황
◦ 남원시 공공조형물 전수조사(‘20. 12. 15. ~‘21. 1. 15.) - 조사방법 : 읍면동 담당자 현장조사 및 공공조형물 관리대장 작성 - 조사결과 : 문화예술과 외 12개소 104건(2021.1.14. 기준) 2020.12.01. 1차 (조형시설물 61건, 상징조형물 8건, 환경조형물7건) 2021.01.14. 2차 (조형시설물 12건, 상징조형물 3건, 공공조형물 벽화 13건) ◦ 남원시 공공조형물 대장 작성(‘21. 1. 18. ~ 21. 1. 22.) ◦ 공공조형물 관리조례 공포(‘21. 3. 26.) ◦ 상반기 공공조형물 실태조사 실시예정 (‘21. 상반기중)

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2020. 11. 17. (제240회)		발언의원 : 손중열 의원
발언내용	예루원을 상시 판소리 공연을 볼 수 있는 전용극장으로 조성
◦ 남원은 판소리 성지이자 동편제의 본향으로 대중성과 예술성을 갖춘 판소리 공연을 관광객 및 수학여행단 등이 날씨에 구애받지 않고 볼 수 있는 상설 공연장이 필요하므로 카페, 한복대여, 전시공간 등으로 활용 하고 있는 예루원을 상시 판소리 공연을 볼 수 있는 전용극장으로 조성
추진상황
◦ 그간의 추진경과 - 창극(판소리) 상설공연장 건립을 위한 국비 지원 협의 : 문화체육관광부 ☞ 문체부에서 시설비 지원 사례는 없고 필요시 시군 예산으로 추진 - 21대 총선 공약사업 발굴 (이용호 국회의원 공약 포함) ☞ 300석 규모 국악 상설공연장 조성 ◦ 관련부서 협의결과 - 관 광 과 : 카페 건물은 활용가능하나 나머지 건물은 전시공간 등으로 활용하고 있어 공연장으로 이용 어려움 - 시립국악단 : 예루원 카페 건물은 구조상 공연장으로 사용하기에 적합하지 않음 ◦ 부서의견 (대안) - 창극(판소리) 상설공연장의 필요성은 공감하고 있으나 국비지원 가능한 매칭사업이 없어 신축 어려우며, 예루원은 공연장으로 부적합하므로 □ 소규모 판소리 공연은 안숙선 명창의 여정을 적극 활용하고, 창극 등 대규모 국악공연을 위해 구)KBS 공개홀을 리모델링하여 300~400석 규모의 국악전용극장 조성 추진 필요 □ 리모델링 및 공연 시설 구축에 약80억원의 예산이 소요될 것으로 추산되며 동부권 개발사업 전출금(균특이양) 사업비 활용 ( 2022년 실비설계비 666백만원 편성)

발언일자 : 2021. 01. 12. (제241회)		발언의원 : 양해석 의원
발언내용	남원시 문화관광재단 설립 제언
◦ 지역 문화예술의 체계적인 진흥과 문화관광 콘텐츠 개발, 문화예술 교육 및 지원, 공공문화관광시설의 효율적 관리와 운영을 위한 지역 문화관광 구심체로서의 재단 필요성 제언
추진상황
◦ 문화(관광)재단 설립에 대한 전문적인 타당성 검토 준비 -「남원문화(관광)재단설립 타당성 검토 연구용역 추진계획」 (문화예술과-2396, 2021.01.29.) - 2021년 제1회 추가경정예산에 연구용역비 확보 추진 예정