2021. 9.

2021년 주요업무 추진실적

도    시    과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2021년 주 요 업 무  결산

□ 2021년 주요업무 추진실적

◦ 도시재생 인정사업[구)미도탕]

◦ 도시재생 활성화 사업

◦ 왕정공원 숲속야영장 조성사업

◦ 왕정공원 등산로 정비사업

◦ 2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 도시가로망 개설 및 인도정비사업(총괄)

◦ 신정대로 개설공사(2구간)

◦ 교룡대로 개설공사(1구간)

◦ 지리산IC 진입도로 개설공사(비도시계획구간)

◦ 시청로 정비공사

◦ 천왕봉로 대로 개설공사

◦ 새터 중로 개설공사

◦ 금암길 개설공사

◦ 만인로 중로 개설공사

◦ 가방뜰길 중로 개설공사

◦ 호치길 도로 정비공사

◦ 식정 관광 우회도로 개설공사

◦ 안전한 보행환경 조성사업(보조)

◦ 남원 도시재생사업(근린재생형)

◦ 터미널지구 도새재생 뉴딜사업

◦ 청년 문화·창업공간 조성사업

◦ 통합마스터플랜 수립 및 도시재생전략계획 변경

◦ 도시공원 내 사유지 매입

◦ 금암공원 조성

◦ 어린이공원 새단장

◦ 만인공원 광장 및 교차로 개선사업

◦ 왕정공원 산림욕장 조성사업

일  반  현  황

□ 기    구

							도 시 과 장
							김 종 학
도시계획담당				도시정비담당							도시재생담당				공원담당
소 명 호				노 경 록							성 월 계				소 민 정
∘도시기본,관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정 및 인가 ∘지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리				∘도시가로망사업 사업시행 및 정비 ∘지역개발사업 ∘안전한보행 환경조성 ∘전선 지중화 사업 ∘시가지 인도 정비사업 ∘장기미집행시설 (도로)해소							∘도시재생사업 ∘도시재생뉴딜 사업 ∘도새재생 전략 계획수립 ∘도시활력증진지역 개발사업 ∘온천업무				∘공원 녹지 기본 계 획(변경) 수립 ∘공원 조성 사업 추진 ∘물방개워터파크 운영 ∘왕정공원 산림 욕장 및 숲속야영장 조성사업

□ 인    력

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	1	4	7	5	3
현 원	18	1	1	7	4		5	공무직 3 실무수습 3
증 감	△3	-	-	3	△3	△5	2

□ 도시관리계획

(2021. 8월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.42 (36.7)	337.75 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2021. 8월 기준)                                                 (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.063 (0.21)	6.351 (20.72)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.06)	1.835 (5.99)	20.415 (66.61)	0.983 (3.21)
남 원	26.646 (100%)	0.063 (0.24)	5.355 (20.10)	0.016 (0.06)	0.784 (2.94)	0.020 (0.07)	1.835 (6.89)	18.573 (69.70)	-
운 봉	1.660 (100%)	-	0.505 (30.42)	-	0.093 (5.60)	-	-	0.700 (42.17)	0.362 (21.81)
인 월	2.341 (100%)	-	0.491 (20.98)	0.005 (0.21)	0.082 (3.50)	-	-	1.142 (48.78)	0.621 (26.53)

□ 도시지역내 도시계획 도로

(2021. 8월 기준)                                               (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	694	8,704	560	8,496	134	208	97.6
대 로	35	2,177	29	2,062	6	115	94.7
중 로	137	3,483	108	3,463	29	20	99.4
소 로	522	3,044	423	2,971	99	73	97.6

□ 건설업체 현황

(2021. 8월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
386	659	335	596	263	524	72	72	51	63

2021년 주요업무 결산

	상반기 주요성과
◦ 도시기본계획 및 도시관리계획 수립(재정비)으로 안정적 도시인프라 구축 ◦ 시민이 안전한 편리한 도시가로망 확충 및 안전한 보행환경 조성 확대 ◦ 주민이 주도하고 전문가와 함께하는 미래지향적 도시재생사업 추진 ◦ 도심속 쾌적하고 안전한 힐링·휴식공간 확대 조성 관리로 시민편의 도모

□ 지속 가능한 도시기본(관리)계획 정비 및 도시개발 추진

◦ 건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

- 도시계획 심의 및 개발행위허가 : 18회  242건

* 전체분과위원회 : 6회 14건,  1분과위원회 : 12회 228건

- 제14대 남원시 도시계획위원회 구성 : 25명 (전체 25. 1분과 9. 2분과 9. 3분과 9)

◦ 2040 도시기본(관리)계획 재정비 : 의견(의회,주민) 청취 및 도시계획위 자문

◦ 부동산종합공부시스템 DB 정보체계 정비로 토지 이용 효율성 도모

- 측량기준점(삼각점, 수준점, 통합기준점) 재조사 : 183개소

◦ 전문건설업 등록 관리 : 81건(신규 39, 변경 39, 폐업 3)

□ 안전한 보행환경 확대 조성 및 장기미집행 도로 해소

◦ 도시가로망 조성 및 인도정비 : 22지구, L=17,886m (17.9km)

- 대로 7지구(L=5,936m), 중로 4지구 (L=2,510m), 소로 8지구(L=7,690m),

인도정비 등 3지구(L=1,750m)

◦ 공 사 중 (13지구) : 교룡대로(1구간), 지리산IC진입도로(비도시), 시청로,   금암길, 만인로, 가방뜰길, 호치길, 서영환내과 옆,  서문3길, 서무1길, 안전한보행환경, 인월지중화, 중소도로유지관리

◦ 설계완료 ( 2지구) : 신촌소로, 황죽마을소로

◦ 보 상 중 ( 3지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로, 장기미집행시설

◦ 공사완료 ( 4지구) : 신정대로(1·2구간), 지리산IC진입도로(도시), 새터중로

◦ 장기미집행 도로(48개노선) 해소 보상 : 14필지 2,742㎡.  918백만원

□ 주민, 전문가와 함께하는 도시재생사업 추진

◦ 원도심, 터미널지구 활성화 및 구)미도탕 인정사업 추진

- 원도심지구 : 구)북부시장 등 H/W사업 완료

- 터미널지구 : 숲정이공유마당, 이음센터, 상생협력상가 설계 완료

- 구)미도탕 인정사업(공공건축심의 완료 및 설계 발주)  * 우수건축자산 등록 선정

◦ 도시재생 전략계획 변경

- 주민공청회, 의회 의견 청취, 도 도시재생위원회 심의

◦ 건축공간연구원(도시재생 정책기관)과 업무 협약

- 원도심 공간관리를 위한 통합 마스터플랜 수립

- 청년 문화・창업공간조성 통합지원, 사랑나눔 어울림센터조성 지원

: 남원 빌드업 프로젝트 추진(역량강화사업 추진 및 집중 컨설팅)

□ 도심속 쾌적하고 편리한 휴식공간 및 볼거리 조성

◦ 장기미집행 도시계획시설(공원) 사유지 매입 : 21천㎡ 574백만원

- 우선관리, 집단화 가능지역 매입 추진

◦ 도심속 공원 및 어린이공원 조성 관리

- 만인광장·교차로(실시설계중), 만인공원(발굴조사중), 금암공원(1단계 공사중)

왕정공원(등산로정비 완료, 산림욕장 공사중, 숲속야영장 실시설계중)

- 어린이공원 새단장 : 2개소(도통 4호, 노암 1호)/ 탄성포장, 노후시설 교체, 화장실 신축

◦ 도심속 어린이 물놀이 시설(워터파크) 운영 : 7.20 ~ 8.31 / 일 4회

2021년 주요업무 추진실적

도시재생 인정사업(구.미도탕)

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 22-1번지

◦ 사업면적 : 대지면적 886㎡ / 연면적 834㎡(지상4층)

◦ 사업내용 : 주민을 위한 문화·예술·상업·체험 복합 공간 조성

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년(3년)

◦ 사 업 비 : 4,389백만원 (국비 2,633, 도비 439, 시비 1,317)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2021	2022	2023이후	비 고
계	4,389	526	667	2,275	921
균 특	2,633	-	400	1,443	790
도 비	439	-	67	241	131
시 비	1,317	526	200	591	-

□ 추진실적

◦ 인정사업 공모 선정                         : ‘20. 12. 21.

◦ 공공건축 사업계획 사전검토                 : ‘21. 04. 06. ~ 05. 12

◦ 제 1기 문화저장 도시재생대학               : ‘21. 05. ~ 07.

◦ 우수건축자산 등록 공모사업 신청/선정       : ‘21. 05. 11. / 05. 18.

※ 우수건축자산 등록 사업

- 주    관 : 건축공간연구원(자체 용역 추진)

- 내    용 : 우수건축자산 등록 및 활용 지원

※ 우수건축자산 등록 시 건축법 특례 적용 가능

․ 건폐율, 대지의 조경, 건축물의 높이제한, 부설주차장 등

- 관 련 법 : 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률

- 사업대상 : 2개소[구)미도탕, 구)남경탕]

- 사업기간 : `21. 06. ~ 10.

□ 금후계획

◦ 공공건축 심의                                : ‘21. 08.

◦ 2021 주민공사업(30백만원, 4~6팀)               : ‘21. 08. ~ 11.

◦ 세부설계용역 및 조성공사 추진                : ‘21. 09. ~ ‘23. 12.

도시재생 활성화 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 원도심 및 공설시장 일원

◦ 사업내용 : 청년 정주환경 조성(3개소), 구도심 거점재생(3개소)

금동(공설시장)지구 활성화지역 토지매입

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024년 (4년)

◦ 사 업 비 : 14,640백만원(시비)

(단위 : 백만원)

사 업 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	14,640	0	0	1,500	13,140
정주환경조성	2,000	-	-	200	1,800	`21~`22
구도심거점재생	10,640	-	-	300	10,340	`21~`24
금동지구토지매입	2,000	-	-	1,000	1,000	`21~`22

□ 추진실적

◦ 청년 정주환경 조성사업 실시설계용역 추진         : ‘21. 01. ~ 07.

- 청년 문화・창업공간 조성 통합지원 용역(건축공간연구원) 과업 포함

※ 청문창공 사업지 내 기 매입한 주택을 주거공간으로 리모델링 추진

◦ 금동 공설시장지구 공모대응을 위한 토지 매입      : ‘21. 04.

- 매입완료(1필지, 165㎡), 조건부매매계약 체결(1필지, 165㎡)

□ 쟁점 및 대책

◦ 구도심 내 거점시설 매입 후 재생을 위한 국토교통부 인정사업 대응

- 연내 원도심지구 도시재생사업 완료 및 활성화지역 제외 후 인정사업 대응

□ 금후계획

◦ 청년 정주공간(주택1동 : 방2개, 3명 거주) 리모델링  : ‘21. 08. ~ 10.

◦ 구.미도탕일원 도시계획시설(문화시설) 지정 추진    : ‘21. 09. ~ 12.

◦ 사업대상지 매입 및 각종 공모 대응                : ‘22. ~ `24.

왕정공원 숲속야영장 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산13번지 일원

◦ 조성면적 : 28,562㎡

◦ 사업내용 : 야영사이트, 산책데크, 쉼터, 부대시설(취사장, 화장실), CCTV 등

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022년(2년간)

◦ 총사업비 : 2,400백만원(균특 1,200. 시비 1,200) / 21년 예산 : 600백만원

□ 추진실적

◦ 숲속야영장 타당성 조사 용역	: ‘20. 06 ~ 08.

◦ 숲속야영장 기본계획 및 실시설계용역(착수, 중간보고)   : ‘20. 12. ~ ‘21. 05.

◦ 숲속야영장 소규모환경 영향평가 용역                  : ‘21. 05. ~ 09.

◦ 캠핑동호회 의견수렴(한국캠핑협회 외 2개 동호회)   : ‘21. 05.

◦ 숲속야영장 실시계획 협의, 실시설계 추진        : ‘21. 06 ~ 08.

□ 금후계획

◦ 공원조성(변경) 도시계획심의, 법률에 의한 조성계획 승인(도) : ‘21. 09 ~ 10.

◦ 원가심사, 실시계획인가                         : ‘21. 10.

◦ 숲속야영장 조성사업 사업시행                   : ‘21. 11. ~ ‘22. 12.

왕정공원 등산로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 왕정공원 등산로(성원고 ~기린봉 ~ 교룡산 임도)

◦ 연    장 : 2.5㎞

◦ 사업내용

-  기린봉 쉼터 정비(데크시설), 안내판, 편의시설 교체

-  노면정비, 보행매트 설치, 휴게시설물 도색 등

◦ 사업기간 : 2021. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 50백만원

□ 추진실적

◦ 등산로 정비 실시설계 용역	: ‘21. 03. ~ 04.

◦ 등산로 정비사업 사업자 선정 및 착공	: ‘21. 05.

◦ 등산로 정비사업 준공	: ‘21. 06.

□ 금후계획

◦ 추석맞이 등산로변 풀베기                      : ‘21. 09

◦ 노면정비 및 시설물 유지관리 등                : ‘21. 09. ~ 12.

2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업 범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업 기간 : 2019 ~ 2021년(3년)

◦ 사업 내용 : 도시기본계획, 도시교통계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 사 업 비  : 총 1,444백만원(시비) (2021년 : 444백만원)

□ 추진실적

◦ 기초조사 및 현황분석	: ‘19. 07. ~ ‘19. 12.

◦ 시민참여단 운영(총 4회)	: ‘19. 11. 14. ~ 12.05.

◦ 추진상황 보고 및 간담회 개최	: ‘20. 02. 28./ 04. 17.

◦ 기본구상(안) 작성, 부분별계획(안) 작성	: ‘19. 12. ~ ‘20.06.

◦ 도시기본계획 입안보고	: ‘20. 08. 20.

◦ 남원시의회 보고	: ‘20. 10. 22.

◦ 국토계획 평가협의회 개최	: ‘20. 12. 08.

◦ 주민의견 수렴(공청회) 개최	: ‘21. 03. 18.

◦ 시의회 의견청취	: ‘21. 03. ~ 04.

◦ 시 도시계획위원회 자문	: ‘21. 08.09~08.13

□ 금후 계획

< 도시기본계획 수립>

◦ 국토계획평가(국토교통부)	: ‘21. 08. ~ 09.

◦ 전북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘21. 10. ~ 11.

< 도시관리계획 재정비>

◦ 도시관리계획(용도지역,용도지구,시설) 정비(안) 작성	: ‘20. 07. ~ ‘21. 08.

◦ 2040 도시기본계획 검토 반영	: ‘21. 09.

◦ 관계기관 협의, 주민의견 수렴 및 시의회 의견청취	: ‘21. 09. ~ 10.

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 심의	: ‘21. 11.

◦ 전북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘21. 12.

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위  치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시행자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 331억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	공공기관	기타
토지이용	171,702.5㎡	67,516.0㎡ 26.2%	11,236.0㎡ 16.6%	5,866㎡ 8.7%	19,081.0㎡ 28.3%	3,769.0㎡ 5.6%	도로,공원, 저류지 등
수용인구·세대수		2,873인 / 1,105호 (2.6인/호)

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: ‘17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: ‘18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: ‘18.12.31. ~ ‘19.05.30.

◦ 법원부지 매각관련 선수협약 체결(LH↔법원,검찰청)	: ‘20. 06.09, 6.18

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도)	: ‘20. 08. 14.

◦ 실시계획 인가 고시	: ‘20. 08. 21.

◦ 환지계획 관련 토지평가위원회 개최(2회)	: ‘20.10.14 / 12.16.

◦ 문화재 시굴조사	: ‘20.12.14 ~ ‘21.07.

◦ 토지이용계획 변경(2차) 관련 도 도시계획위원회 심의완료(수정)	: ‘21. 07. 29.

◦ 감정평가 추진	: ‘21. 08.

◦ 문화재 정밀발굴조사 추진	: ‘21. 08. ~ ‘22. 04.

□ 추진계획

◦ 환지계획인가 추진	: ‘21. 08. ~ ‘22. 02.

◦ 공사추진(LH)	: ‘22. 05. ~ ‘24. 10.

※ 문화재 발굴조사 결과 및 환지 계획 수립으로 인한 토지이용계획 변경 수반시 공사착공일정 순연

도시가로망 개설 및 인도 정비 사업(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로개설 22지구, L=17.9㎞

◦ 총사업비 : 126,219백만원 (21년 예산 : 15,775백만원)

◦ 사업기간 : 2015 ~ 2022년 (8년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2021	2021이후	비고
계	22지구 (L=17.9km)	126,219	72,366	15,775	38,078
대 로	7지구 (L=5.94km)	55,137	49,331	4,156	1,650
중 로	4지구 (L=2.51km)	19,600	13,330	3,570	2,700
소 로	8지구 (L=7.69km)	25,506	6,670	3,984	14,852
인도정비 등	3지구 (L=1.75km)	25,976	3,035	4,065	18,876

□ 추진실적

◦ 공 사 중 (13지구) : 교룡대로(1구간), 지리산IC진입도로(비도시), 시청로,   금암길, 만인로, 가방뜰길, 호치길, 서영환내과 옆,  서문3길, 서무1길, 안전한보행환경, 인월지중화, 중소도로유지관리

◦ 설계완료 ( 2지구) : 신촌소로, 황죽마을소로

◦ 보 상 중 ( 3지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로, 장기미집행시설

◦ 공사완료 ( 4지구) : 신정대로(1·2구간), 지리산IC진입도로(도시), 새터중로

□ 금후계획

◦ 완공대상 (8지구 L=5.70㎞)	: 교룡대로(1구간), 지리산IC진입도로(비도시), 시청로, 금암길, 가방뜰길, 서영환내과 옆, 안전한 보행환경, 인월지중화

◦ 계속 시행  (6지구 L=5.04㎞)	: 만인로, 호치길, 서문3길, 서무1길, 신촌소로, 황죽마을소로

◦ 보상  및  설계 (3지구 L=3.34㎞)	: 천왕봉로, 식정관광우회도로, 장기미집행(48개 노선)

2021년 도시가로망 및 인도정비 사업 총괄표

(단위:백만원)

구분	사업명	위치	사업량	총사업비	‘19년 까지	‘20년	‘21년	‘21년 이후	‘21년 추진계획	비고 (사업기간)
계			22개지구 L=17,886m	126,219	48,581	23,785	15,775	38,078
					(2,401)	(1,943)	(1,504)	(3,365)
대로	소 계		7개지구 L=5,936m	55,137	35,551	13,780	4,156	1,650
	신정대로 [1·2 구간]	신정 금동	L=1,500m B=25m	16,000	11,300	3,700	1,000	-	공사완료	‘18~’21
	교룡대로 [1구간]	향교왕정	L=1,300m B=25~35m	19,250	16,351	1,443	1,456	-	공사완료	‘18~’21
					(2,351)	(1,443)	(206)
	지리산IC진입도로 [도시·비도시구간]	아영 인월	L=2,000m B=25m	12,000	5,400	5,000	1,600	-	공사완료	‘17~’21
	시청로	도통	L=750m	6,087	2,500	3,587	-	-	공사완료	‘18~’21
	천왕봉로	인월	L=386m B=25m	1,800	-	50	100	1,650	토지보상	‘20~’22
중로	소 계		4개지구 L=2,510m	19,600	7,930	5,400	3,570	2,700
	새터중로	조산 신정	L=400m B=20m	6,800	4,400	2,200	200	-	공사완료	‘17~’21
	금암길	노암	L=750m B=15m	7,000	2,800	1,000	1,200	2,000	공 사 중 토지보상	‘18~’22
	만인로중로	향교 용정	L=1,100m B=20m	4,000	700	1,600	1,000	700	공 사 중	‘18~’22
	가방뜰길 중로	금동	L=260m B=20m	1,800	30	600	1,170	-	공사완료	‘19~’21
소로	소 계		8개지구 L=7,690m	25,506	4,950	1,720	3,984	14,852
	호치길	광치	L=2,800m B=8~10m	4,800	2,100	900	1,000	800	공 사 중	‘18~’22
	서영환내과옆	동충	L=288m B=4~6m	2,600	2,600	-	-	-	공사완료	‘18~’21
	식정관광 우회도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000	200	370	998	10,432	토지보상	‘19~’27
						(250)	(998)	(3,365)
	황죽마을 소로	고죽	L=398m B=10m	1,800	-	30	-	1,770	설계완료	‘20~’22
	서문 3길 소로	왕정	L=142m B=6m	1,500	30	100	1,000	370	공사시행 토지보상	‘20~’22
	서무 1길 소로	인월	L=402m B=8m	1,500	20	300	680	500	공 사 중 토지보상	‘20~’22
	신촌 소로	신촌	L=200m B=6m	1,000	-	20	-	980	설계완료	‘20~’22
	중소도로 유지관리사업	관내	L=500m	306	-	-	306	-	공사완료	‘21
인도정비 등	소계		3개지구 L=1,750m	25,976	150	2,885	4,065	18,876
	안전한보행 환경조성(보조)	쌍교 도통	L=1,400m	4,000	150	2,050	1,800	-	공사완료	‘19~’21
					(50)	(250)	(300)
	인월1길 지중화사업	인월	L=350m	1,300	-	35	1,265	-	공사완료	‘20~’21
	장기미집행 도로 해소 보상	관내	48개 노선	20,676	-	800	1,000	18,876	토지보상	‘20~’25

신정대로 개설공사 (2구간)

(계속사업)

남원역

금동아파트

⇦ 순창

17

만복사지

(중로1-2)

L=0.15km, B=20m

(소로2-138)

L=0.15km, B=8m

개설완료[1구간]

L=900m, B=25m

(대로1-7)

L=1.5km, B=25~35m

광치천

2구간

L=600m, B=25m

교량1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 딩동댕 어린이집 ~ 금동APT 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.6km, B=25.0m, 교량 1개소(L=54m, B=25m)

◦ 총사업비 : 10,500백만원(시비 10,500) / 21년 예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역	: ‘17. 10. ~ ’18. 04.

◦ 1차분 공사 준공                          : ‘19. 04. ~ ‘20. 03.

- 토공, 교량공, 구조물공 등

◦ 2차분 공사 준공 (전체분 80%)	: ‘20. 04. ~ ‘20. 12.

- 우수, 오수, 상수도, 포장공, 회전교차로 등

◦ 3차분 공사 착공	: ‘21. 03. 04 ~

- 포장공, 소로구간(토공, 우수공, 상수도공, 포장공)

◦ 신정대로 (금동아파트 앞 회전교차로 ~ 남원역 회전교차로) 개통  : ‘21. 06. 21.

◦ 신정대로 중로 (왕정교~신정대로) 포장 및 부대시설              : ‘21. 06.

◦ 신정대로 소로 (한전주 이설 및 포장) 개통                      : ‘21. 06.

◦ 전체분 공사(도로 및 전기분야) 준공                     : ‘21. 07.

교룡대로 개설공사 (1구간)

(계속사업)

⇦ 북남원I.C

시 청

국토정보공사

신협

구 남원역

도로개설(1구간)

L=0.8km, B=35m

개설완료 (2구간)

L=0.5km, B=25~35m

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 한국국토정보공사 ~ 신협 일원

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=0.8km, B=35m

◦ 총사업비 : 10,950백만원(국비 4,000. 시비 6,950) / 21년 예산 : 1,456백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년) / 공정율 80%

□ 추진실적

◦ 향교오거리~신협~향교APT 구간 공사 완료	: ‘18. 06. ~ ’19. 11.

◦ 매장문화재 발굴조사 완료 [1차, 2차]	: ‘19. 11. ~ ’20. 12.

- 구    간 : 국토정보공사~향교동 761-2 / 향교동 761-2 ~ 영락교회

- 조사결과 : 성벽 앞으로 집터, 석렬, 담장, 적심, 우물터 등 발굴됨

◦ 교룡대료 개설공사 [1구간](2차분) 공사 준공	: ‘19. 11. ~ ’20. 12.

- 토공, 배수공 등

◦ 3·4차분 공사 추진	: ‘21. 04. ~  ‘21. 08.

- 우수공, 오수공, 포장공, 부대공 (국토정보공사 ~영락교회구간)

- 인도 포장 및 가로등 설치                      : ‘21. 08.

◦ 남원경찰서 ~ 영락교회앞 포장완료	: ‘21. 07. ~  ‘21. 08.

□ 추진계획

◦ 문화재 발굴 마무리 추진                       : ‘21. 08. ~  ‘21. 12.

- 영락교회 앞 삼각지 부분 발굴 추진

◦ 전체분 공사 준공	: ‘21. 12.

지리산IC 진입도로 개설공사(비도시계획구간)

(계속사업)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

개설완료

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 서무리(현대주유소)~아영면 인풍리(지리산IC) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=1.1km, B=25m

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (4년) / 공정율 30%

◦ 사 업 비 : 6,200백만원(시비 5,200. 도공 1,000) / 21년 예산 : 1,600백만원

□ 추진실적

◦ 비도시지역 실시설계 추진	: ‘19. 01. ~ ‘19. 10.

◦ 1차분 공사 준공	: ‘19. 12. ~ ‘20. 07.

- 만남의 광장 조성, 은행나무 이식, 배수시설 설치 등

◦ 2차분 공사 착공	: ‘20. 09.

- 토공, 배수공, 상수도공, 오수공 등

◦ 3차분 공사 착공	: ‘20. 12. 28. ~

- 토공, 구조물공, 배수공 등

□ 추진계획

◦ 당동소하천 교량 완공	: ‘21. 08.

◦ 상수도 및 하수관(우수, 오수관로) 매설	: ‘21. 08.

◦ 회전교차로 및 교량 인근 접속도로 개통	: ‘21. 09.

◦ 전체분 공사 준공	: ‘21. 12.

시청로 정비공사

(계속사업)

구.남원역

남원시청

남원대교

시청로

L=750m

□ 개    요

◦ 위    치 : 시청4가~남원대교 일원

◦ 사 업 량 : 도로환경개선 및 지중화사업 L=750m

◦ 사 업 비 : 6,087백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년) / 공정율 96%

□ 추진실적

◦ 지중화 공사 협약 확정(한전)	: ‘19. 12. 04.

◦ 통신선로(세종텔레콤, KT 등) 협약	: ‘20. 03. ~ ‘20. 04.

◦ 1차분 공사 준공	: ‘20. 04. ~ ’20. 12

- 기존 가로수 이식 및 L형 측구 철거, 빗물받이 설치

- 하수도, 도시가스 등 지하시설물 공사 병행 추진

◦ 2차분 공사 착공	: ‘20.  09.

- 중분대 및 가로변 식수대 설치, 수목 식재, 도로포장 등

- 지중화(전기, 통신) 지속 추진, 경관조명, 가로등 설치

- 한전주 및 통신선 제거, 신호등 및 부대공

◦ 시청4가 바닥신호등 설치 및 신호등 완료         : ‘21. 06. 21.

□ 추진계획

◦ 공사 준공	: ‘21. 08.

- 준공을 위한 사전 점검 완료                    : ‘21. 08. 17.

천왕봉로 대로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 인월리 인월사거리 ~ 상우교

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=386m, B=25m

◦ 사 업 비 : 1,800백만원(시비) (공사비1,300. 보상비500) / 21년예산  : 100백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3년)

□ 추진실적

◦ 분할측량의뢰                                 : `21. 04. 22.

◦ 분할측량성과도 제출                          : `21. 05. 31.

◦ 토지 등록사항 정정                           : `21. 06. 10.

◦ 보상계획 공고                                    : `21. 06. 15.

◦ 편입토지·지장물 감정평가 실시 및 협의요청    : `21. 06. 30.

□ 추진계획

◦ 편입토지보상 추진                            : `21. 01. ~ `21. 12.

새터 중로 개설공사

(계속사업)

보건소

휴먼시아

아파트

신정교차로

기개설(2007~2013)

L=616m, B=20m

국도24호선

도로개설

L=400m, B=20m

메카센트럴

아파트

□ 개    요

◦ 위    치 : 신정동 새터마을 ~ 조산동 요천로 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=400m, B=20m, 교량(새터교) L=52m, B=21m

◦ 사 업 비 : 6,800백만원(시비) (공사비 6,434. 보상비 366) / 21년예산 : 200백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2021년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 추진	: ‘17. 11.  ~ ‘18. 05.

◦ 1차분 준공	: ‘18. 06.  ~ ‘19. 11.

◦ 2차분 준공	: ‘19. 12.  ~ ‘20. 10.

- 토공, 우·오수, 교량 하부 기초 등

◦ 교량 공사 완료	: ‘20. 04.  ~ ’20. 12.

◦ 3차분 추진	: ‘20. 06.

- 포장공, 조경공, 부대공 완료

◦ 3차분 추진 및 전체사업 준공	: ‘21. 03. 17.

- 토취장 정비, 부대공 등

금암길 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 시립국악단 입구~더라우APT 입구 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=0.8km, B=10m, 교량1개소(L=43m, B=10.8m)

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(조정 1,500. 시 5,500) (공사비 6,000. 보상비 1,000) / 21년예산 : 1,200백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘18. 10. ~ ’19. 10.

◦ 용지보상 추진	: ‘19. 11.

- 전체 15필지 1229.6㎡ 중 12필지 925.3㎡, 보상율 93% / 2필지 수용추진

◦ 1차분 공사 추진	: ‘19. 12. ~ ’20. 12

- 교량공, 토공, 기존가옥 철거, L형옹벽 설치

◦ 2차분 착공	: ‘21. 03. 15.

- 시점부 켄틸레버 구조물 축조, 인도설치, 기존 건물 철거 등

□ 추진계획

◦ 옹벽설치 및 도로 포장	: ‘21. 11.

- 토지수용 개시 2필지                           : ‘21. 09. 15.

- 도로 포장을 위한 옹벽설치 완료                : ‘21. 11.

◦ 금암교 하상부 보강 및 도로 연결	: ‘21. 12.

- 추경 600백만원 확보로 도로 개통 추진(공사비등 ‘22년 지급)

◦ 전체분 준공	: ‘22. 12.

만인로 중로 개설공사

(계속사업)

사업구간

L=1.1km, B=20m

남원고

구.방송국

롯데마트

구암지구

용정교

회전교차로

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 남원고 앞 회전교차로 ~ 용정교 일원

◦ 사업내용 : 도로 확포장 L=1.1km, B=20m

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(시비) (공사비 3,346. 보상비 654) / 21년예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘18. 09. ~ ‘19. 03.

◦ 편입부지 협의 매수 추진(4필지 미매입) 87% 완료	: ‘19. 04. ~

◦ 1·2차분 완료 (가옥 철거, 인도데크설치, 법면보강)	: ‘19. 12. ~ ‘21. 03.

◦ 3차분 착공 (토공, 상하수도공, 배수공)	: ‘21. 03. 11.

□ 추진계획

◦ 3차분 추진	: ‘21. 06. ~

- 상·하수도, 인도 설치                          : `21. 07.

- 도로 포장, 부대시설 (차선, 가드레일, 가로등)    : `21. 09. ~ 11.

◦ 전체분 준공                                    : `22. 06.

□ 향후 잔여사업비 800백만원 확보로 사업마무리

가방뜰길 중로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요
◦ 위    치 : 금동 휴먼시아 APT ~ 새터마을 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.26km, B=20m

◦ 사 업 비 : 1,800백만원(시비) (공사비 1,200. 보상비 600) / 21년예산 : 1,170백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (3년) / 공정률 15%

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘19. 11. ~ `20 3.

◦ 1차분 착공 (토공, 구조물공)	: ‘20. 07.

◦ 용지보상 추진 (16필지중 14필지 완료) 87.5%	: ‘20. 09. ~

◦ 2차분 착공	: `21. 06. 07.

□ 추진계획

◦ 토공, 구조물공(pc박스설치)	: ‘21. 08.

◦ 상·하수도, 인도설치	: ‘21. 11.

◦ 도로 포장, 부대시설(차선,가드레일,가로등)	: ‘21. 11. ~

◦ 전체분 준공	: ‘22. 04.

호치길 도로 정비공사

(계속사업)

국도17

광석마을

광치산업단지

호치마을

고산마을

정비완료[1공구]

L=1.1km, B=10m

[2공구] 도로정비

L=1.70km, B=8m

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 광석마을 ~ 호치마을

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=1.70km, B=8~10m

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

◦ 사 업 비 : 4,193백만원 (시비 3,500) / 21년예산 : 1,000백만원

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘18.  02. ~ 12.

◦ 소규모환경영향평가 용역 추진	: ‘18. 11. ~ ‘19. 05.

◦ 도로구역 결정 지형도면 고시	: ‘19. 4. 26.

◦ 1·2차분 공사 추진	: ‘19. 05. ~ ‘20. 11.

□ 추진계획

◦ 3차분 공사 완공	: ‘21. 10.

- 교량(BOX)설치 및 접속부 공사추진            : ‘21. 08.

- 도로부 토공 및 기층포설                     : ‘21. 10.

- 호치마을 주민 불편사항(방지턱 설치)          : ‘21. 10.

◦ 전체분 준공	: ‘22. 08.

식정 관광 우회도로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 식정동 갈치삼거리~요천교 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=2.96km, B=10m, 교량2개소

◦ 사 업 비 : 12,000백만원(국비 4,613. 시비 7,387) / 21년 예산 : 998백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2027년 (9년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: ‘20. 01. ~ 12.

◦ 노선선정에 따른 주민설명회 실시(2회)	: ‘20. 05. 12 ~ 13.

◦ 각종 제반 용역 추진	: ‘20. 03. ~ 21. 3.

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

□ 추진계획

◦ 보상계획공고 및 토지보상 협의	: ‘21. 06. ~ ’22. 12.

- 토지보상 공고 예정(225필지 85,572.9㎡)   : ‘20. 08. 17.

◦ 지역개발사업구역지정 및 도시계획시설 변경 결정 용역    : ‘21. 09. ~ 12.

- 지역개발 및 지원에 관한법률에 따른 사업고시

◦ 공사추진	: ‘22. 08. ~ ’27. 12

안전한 보행환경 조성사업(보조)

(계속사업)

전선지중화 및 인도개설

L=1.334㎞, B=1.5~2m

광한루

삽다리4가

십수정 앞

쌍교동성당

시외버스터미널

선원사4가

동림4가

동문4가

요

천

1

1

1

2

□ 개    요

◦ 위    치 : ①구간(쌍교동 성당~동문4가~선원사), ②구간(십수정~삽다리4가)

◦ 사업내용 : 전선지중화 및 인도개설 L=1.4㎞ (1구간 : 1.1 2구간 : 0.3)

◦ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 600.시비 3,400) / 21년예산 : 1,800백만원(국비300)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (3년)

□ 추진실적

◦ (2구간) 지중화 협약 체결(한전, 통신)       : ’20. 02. ~ 08.

◦ (2구간) 지중화 추진(한전, 통신)            : ’20. 12.~ ’21. 08.

◦ (1구간) 지중화 협약 체결(한전, 통신)	: ’21. 04. 13. ~ 05. 10.

◦ (1구간) 지중화 추진(한전, 통신)          : ‘21. 07.

◦ (2구간) 인도정비 추진                   : ‘21. 07.

◦ (1구간) 인도 및 차도정비 추진           : ‘21. 08.

□ 추진계획

◦ (2구간) 공사 준공                       : ‘21. 09.

◦ (1구간) 공사 준공                       : ‘21. 12.

남원 도시재생사업(근린재생형)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항․금동 일원(원도심 지역 : A=1.12㎢)

◦ 사업내용 : 춘몽․향단로 정비, 사랑나눔어울림센터․커먼스페이스조성, 도시재생대학, 주민 공모사업, 도시재생주민한마당 등

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2021년 (6년) ※사업기간연장(`20년 → `21년)

◦ 사 업 비 : 10,422백만원(균특 5,000. 도비 1,000. 시비 4,422)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	10,422	6,672	3,750	0	-
균 특	5,000	3,125	1,875	-	-
도 비	1,000	625	375	-	-
시 비	4,422	2,922	1,500	-	-

□ 추진실적

◦ 구)북부시장 사랑나눔어울림센터 조성사업 추진

- 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 추진            : ‘21. 01. ~ 08.

- 사업추진을 위한 국토교통부 협의                 : ‘21. 03. ~ 05.

- 구)북부시장 기록화 작업                         : ‘21. 04.

- 슬레이트 및 건축물 철거공사 추진                : ‘21. 04. ~ 06.

◦ 커먼스페이스(한옥군) 리모델링 실시설계            : `21. 03. ~ 07.

◦ 도시재생대학 운영(2과목)                          : ‘21. 03. ~ 10.

□ 쟁점 및 대책

◦ 기 준공된 빨간벽돌 및 조성 예정인 한옥군에 대한 운영주체 선정

⇒ 남원새로이마을관리협동조합 위탁운영 검토 중

□ 금후계획

◦ 커먼스페이스(빨간벽돌) 공간운영계획 수립 및 운영  : ‘21. 08.

◦ 커먼스페이스(한옥군) 리모델링공사 및 청년 입주    : ‘21. 08. ~ 11.

◦ 사랑나눔어울림센터 조성공사 추진                 : ‘21. 08. ~ 12.

남원 도시재생사업(근린재생형) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비고
춘몽로 정비	보행환경 및 경관 정비 (구역사~용성사가 ~남문사가)	3,100	공사 완료 (2018.12.~2020.12.)	지중화, 도시가스매설 병행추진
향단로 정비	보행환경 및 경관 정비 (구역사~법원사가 ~삽다리사가)	1,200	공사 완료 (2018.12.~2020.12.)	지중화, 도시가스매설 병행추진
사랑나눔 어울림센터	꿈꾸는 문화공간 공영주차장 커뮤니티광장 등	2,877	슬레이트 및 건축물 철거공사 완료 실시설계 추진 중
커먼스페이스 (Common Space)	공유하우스 마을카페 코워킹스페이스	1,980	빨간벽돌 조성 완료 한옥군 설계 완료
도시재생 주민한마당	도시재생 성과 공유 및 홍보부스 운영 등	60	주민한마당 추진(2회)
소공동체 활성화사업	주민제안 공모사업	200	주민공모사업 추진 38팀 [‘17(10), ‘18(5), ‘19(9), ‘20(9), `21(5)]
도시재생 모니터링	도시재생사업 성과 평가를 위한 성과지표 측정 관리	120	모니터링 용역 추진 (2018 ~ 2021)
교!용성 (주민학교)	주민역량강화 프로그램 운영 (도시재생대학)	500	도시재생대학 운영 (10회, 505명 수료)
주차장조성	공영주차장 조성 (16면)	320	사업 완료
마을관리사회적 협동조합 육성	마을관리협동조합 육성 프로그램 운영	50	국토부 인가 완료 공구대여점 운영
주민참여 프로젝트 운영	지역거주 주민, 권역기반 전문가 등 프로젝트팀 구성	15	‘19 주민프로젝트팀 운영(11명) 도시재생한마당 장려상 수상
합 계		10,422

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 이음센터․주민커뮤니티시설․상생협력상가 조성, 골목길 개선사업, 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년 (4년)

◦ 사 업 비 : 14,167백만원(균특 8,500. 도비 1,417. 시비 4,250)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	14,167	3,400	3,832	3,583	3,352
균 특	8,500	2,040	2,300	2,150	2,010
도 비	1,417	340	383	358	336
시 비	4,250	1,020	1,149	1,075	1,006

□ 추진실적

◦ 이음센터 조성 설계공모 및 실시설계용역 추진      : ‘21. 01. ~ 11.

◦ 골목길 개선사업 추진(바닥포장, 벽화, CCTV설치 등) : ‘21. 01. ~ 09.

◦ 활성화계획 변경을 위한 국토교통부 협의           : ‘21. 03. ~ 05.

◦ 주민역량강화사업(뉴딜아카데미 4과목, 주민공모 8팀) : ‘21. 03. ~ 09.

◦ 숲정이공유마당 조성 공공건축 사전검토            : ‘21. 05. ~ 06.

□ 쟁점 및 대책

◦ 원활한 사업추진을 위한 활성화계획 변경 필요

- 청년메이커스페이스, 가족센터 등 부처협업사업 반영 연내 변경 추진

□ 금후계획

◦ 활성화계획 변경 추진                         : ‘21. 06. ~ 11.

◦ 골목길개선사업 추진(포켓주차장, 마을쉼터 등)  : ‘21. 0.6 ~ 12.

◦ 상생협력상가 조성 실시설계용역 및 공사추진   : ‘21. 09. ~ ‘22. 06.

◦ 하반기 도시재생뉴딜아카데미 운영             : ‘21. 08. ~ 10.

◦ 숲정이공유마당 설계공모 및 실시설계          : ‘21. 08. ~ ‘22. 06.

◦ 이음센터 조성공사 발주                       : ‘21. 12.

남원 도시재생 뉴딜사업 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비 고
골목길 경관개선	터미널 주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	바닥포장(1,307㎡), 벽화99개소, CCTV(32개소), 보안등(15개)완료 잔여사업 설계 중
숲정이마을 공유마당	마을카페 마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간	2,899	철거공사 완료 공공건축 사전검토 완료 공공건축 심의 신청
남원 이음센터	중간지원조직 공간 조성	7,690	실시설계용역 추진
공영주차장 조성	공영주차장 조성(45면)	295	남원 이음센터 병행 추진
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성	620	석면 및 불법건축물 철거공사 완료
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화	850	주민공모사업 추진(2팀) 도시재생뉴딜아카데미운영 (5회, 107명 수료)	주민공모사업 진행 (8팀 선정)
도시재생 지원센터 운영	현장지원센터 운영	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	센터 운영비
합계		14,167

청년 문화⋅창업공간 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 죽항동 220번지 일원

◦ 사업내용 : 창업플랫폼, 코워킹 스페이스,  상생협력상가 조성 및 통합지원용역 추진

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2021년 (3년)

◦ 사 업 비 : 2,835백만원(도비 500. 시비 2,335)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	2,835	2,230	500	105	0
도 비	500	500	-	-	-
시 비	2,335	1,730	500	105	-

□ 추진실적

◦ 청년공간 조성 통합지원용역 추진              : ‘20. 09. ~ ‘21. 08.

◦ 청년 시범프로그램 운영(5개팀)                 : ‘21. 01. ~ 03.

◦ 남원 빌드업 프로젝트 추진                    : ‘21. 04. ~ 06.

- 1단계 사업 완료 : 청년 아이디어 발굴 및 실무역량 강화

- 2단계 사업 추진 : 예비입주자 모집, 실무역량강화 및 집중 컨설팅

□ 쟁점 및 대책

◦ 빌드업 프로젝트를 통해 선정된 청년단체(4개)를 위한 공간 조성

- 도시재생커먼스페이스(한옥군), 부채박물관 조성공사 추진을 통한 연내 입주 및 운영 추진

※ 기 조성완료(빨간벽돌) 공간 8월 입주 예정

□ 금후계획

◦ 청년 문화・창업공간 조성                        : ‘21. 08. ~ 11.

◦ 공간 입주 및 운영(빨간벽돌 8월 입주)             : ‘21. 12. ~

통합 마스터플랜 수립 및 도시재생전략계획 변경

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도시지역 일원

◦ 사업내용 : 남원시 통합적 관리전략 및 마스터플랜 수립, 실행방안 마련, 도시재생 신규사업 대응 도시재생 전략계획 재수립 등

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년 (2년)

◦ 사 업 비 : 432.6백만원(시비)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
시 비	432.6	-	173.0	259.6	-

□ 추진실적

◦ 도시재생 마스터플랜 및 전략계획 수립 용역 추진 : ‘20. 09. ~ ‘21. 09.

◦ 전략계획 변경을 위한 주민참여계획단 워크숍   : ‘21. 03. 10.~ 18.

◦ 전략계획 변경 주민공청회 개최                : ‘21. 04. 08.

◦ 전략계획 변경 의회 의견청취                  : ‘21. 04. 16.

◦ 전략계획 변경(안) 도 센터 협의                : ‘21. 08. 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 전략계획(안) 승인을 위한 전라북도 도시재생위원회 대응 필요

- 전라북도 심의 전 도시재생위원에 대한 사전 설명을 통해 원안의결 될 수 있도록 사전대응 추진

□ 금후계획

◦ 전라북도 도시재생위원회 심의                    : ‘21. 09.

◦ 도시재생 전략계획 승인 공고                     : ‘21. 10.

◦ 도시재생 통합 마스터플랜 수립                   : ‘21. 10.

도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소 (금암,월락,향교,왕정,신촌,노암)

◦ 면    적 : 2,176천㎡ (사유지 1,292천㎡, 국・공유지 884천㎡)

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2025년 (9년간)

◦ 사 업 비 : 16,000백만원(시비) / 21년 예산 : 2,000백만원

◦ 연도별 투자계획                                      (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2021이후	비 고
계	16,000	6,500	2,000	2,000	5,500
균 특	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	16,000	6,500	2,000	2,000	5,500

□ 추진실적

◦ 장기미집행 도시계획시설(도시공원) 실시계획인가 용역 추진   : ‘19. 09. ~  ‘20. 04.

◦ 도시공원 실시계획 인가	: ‘20. 06. 26.

※ 장기미집행 도시공원 일몰제 기간 유예(‘25. 07.)

◦ 일몰제에 따른 장기미집행 도시공원 해제	: ‘20. 07. 01.

- 전체해제(운봉, 인월공원), 일부해제(왕정공원)

◦ 근린공원 사유지 매입 및 물건 보상               : ‘21. 01. ~ 08.

- 대    상 : 5개소(금암·향교·왕정·월락·노암·신촌공원)

- 매입실적

▸ (‘21 현재)   21천㎡ /1,292천㎡(1.6%), 보상액 :   574백만원

▸ (누   계)  433천㎡/1,292천㎡(34%), 보상액 : 9,074백만원

- 편입토지 및 지장물 감정평가 및 협의매입

□ 쟁점 및 대책

◦ 추진 중인 사업과 연계성이 높고 활용도가 높은 필지를 우선 매입해야 하나 소유자 매도 기피

⇒ 2025년까지 유예된 일몰제에 대비하여 해제 후 난개발 가능성이 높고

추후 사업 효용성이 높은 토지 위주 우선 매입

□ 금후계획

◦ 도시공원 사유지 매입 지속 추진                  : ‘21. 09. ~ ‘25. 06.

금암공원 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 면    적 : 40,000㎡

◦ 사업내용 : 근린공원 조성(인도교, 산책로, 종탑·우물복원, 까페전망대, 쉼터, 화장실 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년(7년간)

◦ 총사업비 : 11,500백만원(시비) /부지매입 10,000. 용역비 3,000. 공원조성 102,000)

- 21년 예산 : 2,500백만원

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23 이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	11,500	1,300	10,200	2,000	2,500	2,500	2,500	700
1단계(근린생활시설)	8,300	1,300	7,000	2,000	2,500	2,500
2단계(관광객유인시설)	3,200	-	3,200				2,500	700

□ 추진실적

◦ 금암공원 조성사업 추진계획 수립	: ‘19. 12. 05.

◦ 1단계 금암공원 조성사업 추진	: ‘20. 02. ~ ‘22. 01.

- 1단계 사업비 : 7,000백만원(전기 719, 조경·기타 6,281)

·전기분야 : 금수정 및 수목 경관조명, 인도교 조명, 가로등 설치 등

·조경분야 : 인도교, 데크산책로, 벽천폭포, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 쉼터, 화장실 등

- 추진상황 : 금수정 및 수목조명, 종탑복원, 벽천폭포, 데크산책로(85%),        우물 복원(80%), 광장 바닥포장(50%), 2주차장(20%), 인도교 제작중(공장)

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업부지내 토지매입(1주차장 등) 협의 매수 어려움

- 국토교통부 수용관련 질의 및 도시계획시설 변경(공원⇒문화시설) 지정 검토

□ 금후계획

◦ 1단계 사업마무리(인도교, 잔디광장, 화장실 등)   : ‘21. 09. ~ ‘22. 01.

◦ 2단계 사업시행(관광객 유인시설)                : ‘22. 02. ~ ‘24. 12.

어린이공원 새단장

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 어린이공원 새단장(탄성포장, 퍼걸러, 수목정비, 화장실 신축 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

◦ 사 업 비 : 1,900백만원(시비) / 21년 예산 : 200백만원

◦ 연도별 투자계획                                  (단위 : 개소/백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	13 / 1,900	7 / 1,100	2 / 200	2 / 200	2 / 400
새 단 장	12 / 1,200	6 / 400	2 / 200	2 / 200	2 / 400
워터파크	1 / 700	1 / 700	-	-	-

※ ‘18년 : 도통 3호, 도통 6호, 도통 7호 /  ‘19년 : 향교 4호, 도통 1호, 도통 2호 /  ‘20년 : 향교 1호, 도통 5호

□ 추진실적

◦ 어린이공원 새단장 실시설계 용역, 일상감사       : ‘21. 01. ~ 04.

◦ 어린이공원 새단장 사업 추진                     : ‘21. 05. ~ 08.

위치	위치	사업비 (백만원)	사업내용
도통 4호 어린이공원	도통초교 옆	200	탄성포장 331㎡, 수목식재 300주, 옥외용 벤치 4개소 점자블럭 70개, 화장실 신축 1개소, BF 인증용역
노암 1호 어린이공원	노암 5통		수목식재 300주, 옥외용 벤치 6개소 등

◦ 도통동 물방개 워터파크 운영                     : ‘21. 07. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 어린이공원 놀이터 기존 모래치환사업(무균모래)   : ‘21. 09.

◦ 추석맞이 어린이공원 풀베기, 제초작업            : ‘21. 09.

◦ 어린이공원 새단장 사업 준공, 시설물·수목 관리  : ‘21. 09. ~ 12.

만인공원 광장 교차로 개선사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원

◦ 사업내용 : 광장조성 및 교차로 개선사업

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3년)

◦ 사 업 비 : 4,600백만원(시비) (용역비 205. 부지매입 2,000. 공원조성 2,395)

- 21년 예산 : 500백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	4,600		205	500	3,895
균 특
도 비
시 비	4,600		205	500	3,895

□ 추진실적

◦「만인공원」광장 교차로 개선 디자인 공모	: ‘19. 03. ~ ‘20. 03.

◦「만인공원」광장 교차로 개선 설계용역 발주계획 수립    : ‘20. 03. 30.

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계공모, 재공모     : ‘20. 04. ~ 08.

◦ 기본 및 실시설계용역 PQ 추진                   : ‘20. 09. ~ 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 착수                       : ‘20. 12. 03.

◦ 실시설계 용역 추진	(착수, 중간보고 1·2차)        : ‘20. 12. ~ 07.

◦ 기본계획(안) 주민설명회(동충동)                   : ‘21. 07. 27.

◦ 기본설계, 도시관리계획 입안서류 작성             : ‘21. 08.

□ 쟁점 및 대책

◦ 건축물 매입보다는 외관 활용방안으로 계획변경, 건물주 협의 필요

- 건물 외부(랩핑) 활용 동의 지속 협의중

□ 금후계획

◦ 도시관리계획(입안) 협의, 주민공람 및 관련부서 협의, 심의  : ‘21. 09 ~ 10.

◦ 문화재현상변경, 실시설계, 실시계획인가 등          : ‘21. 11 ~ ‘22. 03.

◦ 편입토지 및 지장물 보상	: ‘22. 04 ~ ‘22. 06.

◦ 사업시행	: ‘22. 06 ~ 12.

왕정공원 산림욕장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산37번지 일원

◦ 면    적 : 30,000㎡

◦ 사업내용 : 전망대, 야외쉼터, 데크산책로, 숲속교실, 어린이 놀이터 등

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2021년 (2년)

◦ 사 업 비 : 1,200백만원(국비 600, 시비 600) / 21년 예산 : 400백만원

◦ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2020	2021	2022이후	비 고
계	1,200		800	400
균 특	600		400	200
도 비
시 비	600		400	200

□ 추진실적

◦ 왕정공원 산림욕장 타당성조사 용역	: ‘19.10. ~ 12.

◦ 문화재 지표조사 용역                         : ‘20.02. ~ 11.

◦ 기본계획 및 실시설계용역                    : ‘20.03. ~ 12.

◦ 소규모 환경영향평가 용역                     : ‘20.04. ~  12.

◦ 공원조성계획(변경) 열람공고 및 심의, 고시     : ‘20.12. ~ ‘21.01.

◦ 원가심사(전라북도) 완료                      : ‘21. 04.

◦ 실시계획인가 협의                            : ‘21. 04. ~ 05.

◦ 사업계약 및 시행	: ‘21. 06

□ 금후계획

◦ 사업추진 및 준공	: ‘21. 09. ~ 12.