2021. 9.

2021년 주요업무 추진실적

환 경 사 업 소

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2021년 주 요 업 무  결산

□ 2021년 주요업무 추진실적

◦ 하수도 수해복구사업 추진

◦ 남원처리구역 하수관로 확장사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 산내지구 하수관로 정비사업

◦ 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

◦ 요천생태습지공원 관리

◦ 남원하수처리장 운영 및 시설개선

◦ 강우시 하수관리 시범사업

◦ 남원 노후 하수관로 정비사업

◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업

◦ 운봉·인월·소규모 하수도시설 운영관리

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									왕 길 성
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
박 병 준					문 인 구								박 기 정										문 하 성
∘행정 종합계획 수립 ∘공공 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘요천생태습지공원 관리 ∘하수도 요금 부과징수 ∘물 재이용 사업 추진					∘하수도 중장기계획 수립 ∘하수관거정비 사업 추진 (노후,남원3단계,용전,서도 등) ∘오수중계펌프장 관리 ∘배수설비 설치신고 및 관리 ∘하수도 원인자 부담금 부과징수								∘하수처리 종합계획 수립 ∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘슬러지 등 탄화시설 운영 ∘음식물폐기물 처리시설 운영 및 관리										∘운봉·인월 하수처리장 관리 ∘소규모 마을하수처리장 관리 (노후시설 개량사업 등) ∘낙동강수계 기금관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	5	6	6	청 경 2 환경관리원 2 공 무 직 3
현 원	20	1	8	5	3	3	청 경 2 환경관리원 2 공 무 직 4
증 감	△2	-	4	-	△3	△3	1

□ 하수처리시설 현황

총 64개소 (500㎥/일 이상 3개소, 500㎥/일 미만 61개소)

구 분	시설용량(㎥/일)	처리방법	비 고
남원하수처리장	50,000	심바이오공법
운봉하수처리장	800	회분식활성슬러지공법
인월하수처리장	1,000	회분식활성슬러지공법
소규모하수처리장	4,143	질소인고도처리 외 17개 공법	61개소

1. 남원하수처리장 현황

구 분	최 초	1차 증설	2차 증설
시설용량(㎥/일)	50,000	50,000	50,000
처리방법	표준활성슬러지법	심바이오	인제거장치
준공일자	1995.11.4.	2009.11.30.	2012.6.30.
부지면적(㎡)	34,980	36,505	36,505

2. 운봉· 인월 하수처리장 현황

구 분	운봉하수처리장	인월하수처리장
시설용량(㎥/일)	800	1,000
처리방법	회분식활성슬러지공법	회분식활성슬러지공법
준공일자	2006.5.30.	2006.5.30.
부지면적(㎡)	3,735	3,616

□ 요천 생태습지공원 현황

위치	조성 규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1297	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 강우시 하수관리 시범사업(차집관로, 남원[2단계]하수관로) 지속 추진 ◦ 남원[3단계]하수관로 정비사업 본격 추진 ◦ 남원 노후 하수관로 정비사업 완료 ◦ 소규모 공공하수시설 관리대행으로 최상의 시설물 관리 및 하수처리 ◦ 요천 생태습지공원 지속적인 시설정비

□ 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리

◦ 강우시 하수관리 시범사업 및 하수관로 확충사업

- 하수관로(차집관로, 2단계 하수관로) 정비사업 지속 추진

- 남원[3단계]하수관로 정비사업 본격 추진

- 남원 노후 하수관로 정비사업 완료

◦ 운봉, 인월, 소규모 마을하수처리시설 완벽 운영관리

- 개량사업 추진 2개소(방촌, 비전)

- 기술진단 실시 15개소(광평, 대상, 대정, 매요, 백일 등)

- 내진성능평가 실시 43개소(학청, 태평 등)

□ 하수처리 노후시설물 개선 및 최적운영으로 청정하천 수질보전

◦ 하수처리시설 방류수 수질기준 준수 (2021.07.31.기준)

- 처리상태 : BOD 2.1㎎/L, TOC 9.2mg/L, SS 4.9㎎/L, T-N 15.350㎎/L, T-P 0.079㎎/L

(법적기준 : BOD 5㎎/L, TOC 15mg/L, SS 10㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 0.3㎎/L)

□ 하수처리장과 연계한 생태습지공원 운영·관리

◦ 방문자 현황 : 11,485명

- 생태습지공원 : 8,955명

- 애견놀이터 : 2,530명/2,677마리 (7월말 기준)

◦ 요천 생태습지공원 그네벤치, 그늘막, 태양광가로등, 탐방로 설치 완료

◦ 요천 생태습지공원 잡초제거 및 환경정비로 쾌적한 휴식공간 제공

2021년 주요업무 추진실적

하수도 수해복구사업 추진

(신규사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 14개소 (소규모 마을하수처리시설 8개소, 하수관로 6개소)

◦ 복구사업비 : 4,784백만원 (전액국비)

◦ 복구개요

구 분	위 치	복구금액 (백만원)	비고
계	14개소	4,784
소규모 마을하수처리시설	8개소 (백일,송내,사석,상귀,세전,입암,서만,호곡)	3,608
하수관로	6개소 (주촌천,원천천,광치천,옥률천,장포천,금강마을)	1,176

◦ 복구기간 : 2020. 8. 15. ~ 2021. 6. 30.

◦ 사업내용

- 소규모 마을하수처리시설 : 처리장 및 중계펌프장 복구 (기계,전기,토목,건축 등)

- 하수관로 : 하천내 차집관로 및 하수관로 원상복구 L=3.2km

□ 추진실적

◦ 수해발생에 따른 응급복구 시행              : 2020. 8. 15. ~ 9. 30.

- 소규모 마을하수처리시설 : 임시 응급운영 (8개소)

- 하수관로 : 관로 임시설치(하천내 오수 유출방지), 관로준설

◦ 하수관로 수해복구  공사완료(6개소)	: 2021. 6. 7.

◦ 하수처리시설 수해복구 (공정율 95%)

- 공사 완료 : 7개소(백일, 송내, 사석, 상귀, 세전, 입암, 서만)

- 공사 진행중 : 1개소(호곡)

□ 추진계획

◦ 호곡처리장 공법기자재 설치 및 보강공사 완료 : 2021. 9월말

남원처리구역 하수관로 확장사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 일원 (9개 마을)

- 신정동, 화정동, 한우물, 주생면(부동,상동,중동,소지,대지), 산동면(목동)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 17,270백만원(국비 12,089, 시비 5,181)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500, 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 10월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원 (12개 마을)

- 아영(봉대,외인,내인,매산,서갈,동갈), 인월(덕실,연실,자래,외건,내건,지산)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=15.4km, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 16,000백만원(국비 11,200, 시비 4,800)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500, 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                        : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                 : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 10월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2024. 12월

산내지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원 (5개 마을)

- 산내면(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.6km, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 6,500백만원(국비 4,550, 시비 1,950)

※ 2021년 사업비 : 358백만원 (국비 250, 시비 108)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 9월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2022. 12월

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원 (4개 마을)

- 사매면(손율, 수월, 덕평, 인화)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.4km, 배수설비 150여 가구

◦ 총사업비 : 5,870백만원(국비 4,109, 시비 1,761)

※ 2021년 사업비 : 714백만원 (국비 500, 시비 214)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2개년)

□ 추진실적

◦ 신규사업지구 신청                         : 2020. 4월

◦ 2021년 신규사업지구 선정                  : 2020. 12월

◦ 실시설계용역 추진	: 2020. 6월 ~ 2021. 9월

- 현장조사 및 설계서 작성

- 소규모환경영향성검토 시행

- 설계안정성검토 시행

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2021. 9월

◦ 실시설계 완료	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2021. 11월

◦ 전체사업 완료	: 2022. 12월

요천생태습지공원 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2021. 12월(연중)

◦ 총사업비 : 280백만원

◦ 관리인력 : 2명 (환경관리원 1, 공무직 1), 공공근로 상시배치

◦ 사업내용 : 화단 조성, 잔디식재, 쉼터조성, 애견놀이터 운영

□ 추진실적

◦ 시민 휴식 공간 설치 및 정비

- 개수대 1개소 (6구형), 그네벤치 2개소, 안전울타리 110경간(L=220m)

- 조경수 식재 (병꽃나무 1,200주), 잔디식재 (2,198㎡)
- 수목 관리 (전정, 제초), 음수대 보수 7개소, 파고라 도색 15개소

◦ 시설물 정비 및 관리

- 모정, 파라솔, 태양광가로등, CCTV, 배수로 및 음수대 정비 등

◦ 애견놀이터 운영관리

- 연장운영 (09:00 ~ 21:00)	: 2021. 3월 ~ 10월

- 안내판 설치, 시설물 정비 (놀이대 등), 청결관리 (배변수거, 잡초제거 등)

□ 금후계획

◦ 생태습지 수초제거 및 침전물 준설공사 추진(25,101㎡)	: 2021. 8월

◦ 메타세콰이어 고사목 제거 및 보식작업(63주)	: 2021. 9월

◦ 산책로 포장정비 공사 추진(L=130m, B=2.5m)	: 2021. 10월

남원하수처리장 운영 및 시설개선

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설용량 : 50,000톤/일, 처리공법 : Symbio공법

◦ 처리개요 : 생활하수, 분뇨, 침출수 및 음식물류 폐기물의 병합처리

◦ 수질관리항목 : 총 6항목(BOD, TOC, SS, T-N, T-P, 총대장균군수)

◦ 슬러지 처리 : 탄화처리(처리시설 민간위탁 관리)

□ 추진실적

◦ 철저한 수질관리로 방류수질기준 준수

(단위 : ㎎/L, 개)
항목 구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	비고
유입수	134.5	85.6	165.4	41.354	4.199	96,876
방류수 / 기준	2.1 / 5	9.2 / 15	4.9 / 10	15.350 / 20	0.079 / 0.3	38 / 1,000

◦ 음식물 병합처리 : 음식물류 폐기물 19.1톤/일(총 3,480.38톤) 처리

◦ 현장 여건 개선으로 안정적인 현장운영

- 탈수동 도장, 유입동 지붕보강, 호이스트 정비(32백만원)   : 2021. 4월 ~ 6월

◦ 환경부 2022년 스마트 하수처리장 국비보조사업 선정    : 2021. 7월

- 정보통신기술(ICT)·인공지능(AI) 기반 제어, 기능보강을 통한 스마트 하수처리장 구축

(사업비 40.74억 / 국비 20.37억, 도비 10.185억, 시비 10.185억)

◦ 수질관리를 위한 처리시설 정비 및 개선

- 드럼스크린 보수 및 원심농축기 정비(25백만원)           : 2021. 5월 ~ 7월

- 음식물류 폐기물처리시설 햄머 및 배관 정비(12백만원)    : 2021. 5월 ~ 7월

- 원심탈수기 설치(600백만원)                             : 2021. 4월 ~ 8월

□ 금후계획

◦ 남원하수처리장 국가안전대진단 실시                : 2021. 9월 ~ 10월

◦ 정기적인 실험분석 및 운영시스템 모니터링으로 방류수질 기준준수

- 실험 데이터를 통한 운영시스템 관리로 최적의 수질관리 시스템 구축

- 방류수 수질 상시 모니터링 : TMS

◦ 시설물 점검·정비, 개선으로 안정적인 처리시설 운영

- 처리시설 점검(매주), 구조물 안전점검(년2회), 시설정비(상시)

강우시 하수관리 시범사업

(계속사업)

□ 개    요

구 분		차집관로 정비사업		남원(2단계) 하수관로 정비사업
위 치		➢ 남원시 일원 (8개하천)		➢ 남원시 일원 (6개지역)
사 업 량		➢ 차집관로 정비 L=31km		➢ 하수관로 정비 L=57km ➢ 배수설비 3,620여 가구
총사업비		➢ 41,974백만원(국27,937, 시14,037) ➢ 기투자 : 33,370‘21년 : 7,363		➢ 34,477백만원(국24,099, 시10,378) ➢ 기투자 : 24,626‘21년 : 7,782
사업기간		➢ 2018~2022		➢ 2018~2022

□ 추진실적

◦ 시범사업 대상 선정	: 2015. 2월

◦ 한국환경공단 위·수탁 협약 체결	: 2015. 3월

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2015. 6월 ~ 2018. 8월

◦ 공사추진	: 2018. 10월 ~

- 현장 및 민원관리를 위해 매주 1회 회의시행 (한국환경공단, 시공사)

- 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

◦ 공 정 율 : 차집관로 88% , 2단계 96%      : 2021. 8월 현재

(차집:31km 중 29km완료, 2단계:57km중 49km완료, 배수설비 3,592가구 중 3,245가구 완료)

□ 금후계획

◦ 차집관로 정비(요천구간) 공사완료                  : 2021. 8월말

◦ 사업효과 분석을 위한 불명수 유량데이터 분석      : 2021. 8월~9월

◦ 전체사업 완료                                    : 2021. 10월

남원 노후 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원 (시청주변 - 도통택지 1지구)

◦ 사업내용 : 노후 하수관로 정비 L=6.9km, 배수설비 300여 가구

◦ 총사업비 : 8,448백만원(국비 3,224, 시비 5,224)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: 2017. 2월 ~ 2017. 11월

◦ 환경부 재원협의 등 행정절차 이행	: 2018. 5월 ~ 2019. 7월

◦ 공사추진	: 2019. 12월 ~

◦ 공 정 율 : 99%	: 2021. 8월 현재

(하수관로 6.9km 중 6.9km완료, 배수설비 300가구 중 300가구 완료)

(설계변경 및 사업준공 준비중)

□ 금후계획

◦ 전체사업 완료                             : 2021. 8월

남원(3단계) 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 오수관로 설치 L=31.7km, 배수설비 1,763가구

- 운봉처리구역 : 오수관로 설치 및 개량 L=15.2km

◦ 사 업 비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2021년 사업비 : 13,432백만원(국비 13,432, 시비  - )

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

□ 추진실적

◦ 2018년 신규사업지구로 확정 내시	: 2017. 11월

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11월 ~ 2019. 3월

◦ 공사추진                                 : 2020. 2월 ~

- 주천면 용궁, 상주, 하주, 내송, 신기마을, 향교동, 왕정동, 노암동 등

◦ 공 정 율 : 45%	: 2021. 8월 현재

(하수관로 31.7km 중 19.7km완료, 배수설비 1,763가구 중 545가구 완료)

□ 금후계획

◦ 2021년 하반기 공사시행 추진

- 기존 공사시행구간 마무리

- 향교동, 광치동, 신정동 일원

◦ 전체사업 완료                             : 2023. 12월 까지

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(계속사업)

1. 방촌 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

◦ 소 재 지 : 금지면 방촌리 1272-1 (처리구역 : 방촌)

◦ 사 업 비 : 1,288백만원(국 386, 시 902)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 / 처리용량 50㎥/일

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 설계 완료 및 공사 착공	: 2020. 12월

◦ 임시처리시설 설치 및 운영(50㎥/일)	: 2021. 02월 ~

◦ 기존시설 철거 및 가시설 설치	: 2021. 03월

◦ 지하 구조물 레미콘 타설	: 2021. 05월

◦ 공법기자재 구매 설치	: 2021. 09월

◦ 공사 준공	: 2021. 12월

2. 비전 소규모 마을하수처리시설 개량사업

□ 개    요

◦ 소 재 지 : 운봉읍 화수리 213-1 [처리구역 : 비전, 전촌, 군화동]

◦ 사 업 비 : 600백만원(국 180, 시 420) ⇒ 재원협의시 변경

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 / 처리용량 : 60㎥/일

□ 추진실적 및 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 착수	: 2020. 4월

◦ 하수도정비 기본계획 부분변경(환경부)	: 2021. 1월

◦ 공법선정	: 2021. 5월

◦ 변경인가(전라북도) 및 재원협의(환경부)	: 2021. 9월

◦ 원가심사 의뢰	: 2021. 10월

◦ 공사착공	: 2022. 3월

운봉·인월·소규모 하수도시설 운영관리

(계속사업)

□ 개   요

◦ 현    황 : 공공하수도시설 114개소

- 공공하수처리장 (500㎥이상) : 2개소

- 소규모 공공하수처리장 (500㎥이하) : 61개소

- 중계펌프장 : 51개소

◦ 운영방법 : 관리대행 [(주)일토씨엔엠 & (주)티에스케이워터]

◦ 계약금액 : 1,600백만원

□ 추진실적

◦ 소규모 마을하수 시설물 정비	: 2021. 1월 ~ 8월

- 68건 (기계 53건, 전기 15건), 107백만원

◦ 방류수 수질분석(법정 수질기준 준수)	: 2021. 1월 ~ 7월

- 운봉,인월:매일, 50톤이상 38개소:주1회, 50톤미만 23개소:월1회

◦ 운봉, 인월 하수처리장 악취 분석 (정상)	: 2021. 7월

◦ 운봉·인월 시설물 안전점검 (상반기)             : 2021. 6월

◦ 막분리공법 분리 평막 세척 (2개소/부운,하신, 10백만원)	: 2021. 8월

□ 금후계획

◦ 운봉 ․ 인월처리장 국가대안전진단 실시	: 2021. 9월 ~ 10월

◦ 폐쇄 마을하수처리시설 철거 (폐기물 구원천·용전, 130백만원): 2021. 8월 ~ 12월

◦ 운봉,인월 하수처리장 노후화 시설물 일제점검 및 보수: 2021. 8월 ~ 12월

- 송풍기, 종합협잡물 처리기, 노후화 기계설비 등

◦ 소규모마을하수처리장 원격감시제어시스템 업그레이드(43개소): 2021. 10월 ~ 11월

- 시설물 이상 발생시 문자 전송으로 신속하게 대응