2021. 9.

2021년 주요업무 추진실적

관광시설사업소

목        차

□ 일      반      현     황

□ 2021년 주 요 업 무  결 산

□ 2021년 주요업무 추진실적

◦ 어린이과학체험공간 확충 지원사업 추진

◦ 항공우주천문대 바리스타 로봇 설치 사업 추진

◦ 솔바람길 힐링 숲 가꾸기 사업

◦ 문화가 있는 광한루원 관광객 유치

◦ 항공우주천문대 선도적 과학체험 활성화

◦ 전통보존과 관광 시설 정비(보조)

◦ 광한루원․관광지 편의시설 정비(자체)

◦ 조경 전문인력 효율적 정원 관리

◦ 춘향문화예술회관 리모델링 공사

◦ 춘향테마파크 및 향토박물관 운영

◦ 춘향테마파크 유지관리 정비사업

일  반  현  황

□ 기    구

								관광시설사업소장
								박 영 재
시설지원담당					시설정비담당									시설환경담당								춘향테마파크담당
김 태 훈					김 종 만									이 선 욱								소 순 규
▪업무종합 기획 조정 ▪예산, 회계, 물품관리 ▪재산 및 수입금 관리 ▪관광유치 및 홍보 ▪항공우주천문대 운영					▪광한루원 시설물 보수관리 ▪남원관광지 시설물 유지관리 ▪음악분수대 시설물 유지관리 ▪승월폭포 시설물 유지관리 ▪교룡산관광지 시설물 유지관리									▪조 경, 수 목 관 리 ▪공공시설물 청결 유지 ▪관광시설 환경조경▪공중화장실 유지관리 ▪춘향문화예술회관 운영								▪테마파크시설물관리 ▪향토박물관 운영 및 시설물 유지 관리 ▪민속자료,민속문화 조사 연구 및 총괄

□ 인    력 ---------- 현원 49명(정규직 24, 공무직 등 25)

구분	합계	일반직							기타 (청경, 공무직)	비고
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	학 예 연구사
정원	50	25	1	5	6	8	4	1	25
현원	49	24	1	8	5	5	4	1	25
증감	△1	△1	-	3	△1	△3	-	-	-

◦ 시설물별 인력배치 현황

(단위 : 명)

구 분	계	광한루원	관광지 사랑의광장	항공우주 천문대	춘향 테마파크	향토 박물관	춘향문화 예술회관	교룡산 국민관광지
계	49	26	5	6	4	2	5	1
정규직	24	13	-	3	3	1	4	-
청원경찰	2	-	2	-	-	-	-	-
환경관리원	8	4	3	-	-	-	-	1
공무직	15	9	-	3	1	1	1	-

□ 관광시설사업소 주요시설 현황

구 분	명 칭	위 치	면 적(㎡)	주요 시설물 현황	비 고
광한루원		요천로 1447	지정 70,542 보호 8,091	◦광한루 외 29동 2,215㎡ ◦연지(3,537㎡),오작교(58m)	명승‘08. 1. 8
광한 루원	춘향관	요천로 1447	건물 689.6	◦춘향관, 영상관, 수장고, 로비 ◦사진500점, 도서307점 등	개관‘16. 5.11
	경외상가	광한서로 12	건물 1,344	◦건물규모 : 7동 36점포 ◦춘향VR체험관 직영 (18.5.19)	준공‘88.10. 5
	광장 주차장	요천로 1447	부지 3,102	◦주차 가능 대수 83대 : 대형8, 소형69, 장애6	개설‘90년도
	서문 주차장	광한서로 21	부지 8,438	◦주차 가능 대수 164대 : 대형19,소형139(임산11), 장애6	준공‘09. 2월
남원관광지		어현동 27-21	개발 395,438 녹지 289,795	◦공공시설,숙박6,상가43,오락3, ◦휴게14,일주문,벽천폭포 등	지정‘84. 7.28
남 원 관광지	춘향테마파크	양림길 14-9	부지 66,468 건물 2,266	◦건물 : 관아 외 22동 ◦모형물 : 춘향,몽룡 등 14종	개장‘04. 5. 1
	향토박물관	양림길 14-9	부지 8,172 건물 1,185	◦전시4실, 야외전시15종 ◦소장유물사료 2,499점	개관‘04. 5. 1
	춘향문화예술회관	양림길 43	부지 10,604 건물 4,683	◦지상 2층, 지하 1층 ◦대공연장715석,소공연장112석	개관‘95. 5. 6
	항공우주천문대	양림길 48-63	부지 6,532 건물 1,494	◦천체관측실 2개소 ◦영상실 및 교육실 3개소	개관‘09.10. 9
	사랑의 광장	양림길 12	부지 5,665	◦무대, 객석, 조정실, 광장 ◦야외객석 : 2,205석	준공‘08. 6. 3 등록‘10. 3. 31
	음악분수대	양림길 12	부지 395	◦분수시설 1식, 수중모터14개 ◦수중등 272개, 전기 1식 등	준공‘95. 5. 5
	승월폭포	노암동 439	면적 2,588	◦황토강화포장 및 화강판석 ◦수중등 10개, 인조 조형 3식	준공‘10.10.24
	승월교	노암동 807-1	길이 80m	◦청사초롱 78개 ◦인조 조형 4식, 감성시화 14점	준공‘97.10월
	초화원	노암동 439-15	부지 5,972	◦테크로드 1식, 모정 ◦자산홍 외 12종(15,750주)	준공‘10.10.24
	남원관광지 주차장	어현동 37-12	부지 17,017	◦주차 가능 대수 : 276대	준공‘87.12.31
	덕음정	신촌동 산21-3	부지 400	◦체련기구, 파고라, 음수대 등	준공‘98. 8월
	솔바람길	덕음산 일원	데크 1,650m	◦데크로드 1,650m	준공‘10. 3월
	요천 수경시설	어현동 741	부지 4,423	◦음악분수, 바닥분수 ◦물놀이장, 유수풀장	준공‘21. 3월
교룡산	교룡산 국민관광지	산성순환길 714	공원 192,496 관광지 59,130	◦취사장,야유회장,화장실3, ◦축구,테니스2,체련기구7,주차61	지정‘87.10.13

□ 입장객 및 입장료 수입         ※ 작성 기준일 8월 13일

(단위 : 명 / 천원)

구 분		광한루원		춘향테마파크			항공우주천문대
		2020년	2021년		2020년	2021년		2020년	2021년 (4.10 재개관)
입장객	계	342,342	307,810		33,783	19,515		6,049	12,803
	유 료	140,013	161,938		15,979	12,329		5,200	10,469
	무 료	202,329	145,872		17,804	7,186		849	2,334
입장료 수입		395,478	459,433		42,381	32,561		13,127	24,389

□ 기타 사용료 수입

(단위 : 천원)

구 분	주차대수 / 건수		사용료 수입		비 고
	2020년	2021년	2020년	2021년
계	47,314	59,145	99,669	124,424
광한루원 경외 주차장	46,745	57,191	95,458	115,352
춘향문화예술회관	39	35	2,027	1,020
사랑의 광장	0	1	0	150
춘향VR체험관	530	1,918	2,184	7,902

□ 공유재산 임대수입

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2021년	비 고(계약기간)
계	73,514	225,619	※ 2020년 코로나19 임대료 감면
광한루원 경외상가	59,082	178,728	2021.1.1.~2023.12.31.(3년)
사진촬영소	4,438	9,320	2021.1.1.~2021.12.31.(1년)
잉어먹이판매소	9,596	37,364	2020.1.1.~2021.12.31.(2년)
자판기 및 기타	398	207	2020.5.1.~2022.04.30.(2년)

□ 그 외 수입

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2021년	비 고
계	8,110	7,887
사랑의 동전던지기	6,763	7,367
춘향사당	613	0	임시폐관
장원급제 기원단	734	520

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 어린이과학체험공간 조성 공모 선정 및 항공우주천문대 리모델링 사업 완료 ◦ 항공우주천문대 서비스로봇 활용 실증사업 최종 선정 (바리스타 로봇 도입) ◦ 광한루원 국제적 홍보 영상 촬영 :『코리아 ON 스테이지』2021. 8. 12.방영 ◦ 광한루원 관람로 보수(동선 정비) 및 동문 확장 실시설계 완료 및 공사 추진 ◦ 코로나19 안전하고 편안한 관람을 위한 클린 방역 대응 추진 ◦ 코로나19 소상공인 임대료 감면 추진 : 경계단계 종료 시 지급 ◦ 향토박물관 특별·기획전시회 개최 : 만복사지 출토 유물전 외 2회 ◦ 광한루원, 관광지(덕음산 솔바람길) 야간경관 구축을 통한 관광 활성화 도모 ◦ 관광시설물 보수․정비, 연지 및 조경 관리로 관광객 이용 만족도 향상

□ 호남권 지역거점 천문과학관 정착을 위한 기반구축

◦ 항공우주천문대 리모델링 사업 완료 : 1,000백만원(국500, 시500)

- 4월 10일 재개관(전년도 대비 관람객 112% 증가, 세외수입 86% 증가)

◦ 어린이과학체험공간 조성 공모사업 선정 : 2,000백만원(국1,000, 시1,000)

◦ 2021년 기간제근로자 인건비 공모 선정 : 145백만원(국100%)

- 인건비 확보를 통한 신규 VR체험장비 상시운영 및 기관 재정자립도 향상 기여

◦ 항공우주천문대 서비스로봇 활용 실증사업 최종 선정 : 100백만원(국70, 시30)

- 바리스타 로봇 설치 1식

□ 영화·드라마등 방송 촬영 미디어 홍보

◦ 광한루원 내 영화·드라마 및 방송 촬영 지원으로 미디어 홍보 : 15건

- 드라마 (암행어사 외 3건), 방송 (김영철의 동네한바퀴 외 10건)

◦ 광한루원 국제적 홍보 영상 촬영 :『코리아 ON 스테이지』

- 2021. 7. 20.촬영(비대면) [8. 12. 방영] / 문화재청, 한국문화재재단, KBS한국방송 주관

□ 관람객 편의를 위한 각종 시설·환경 관리정비

◦ 광한루원 정비(관람로 보수, 동문확장 등), 안전경비 및 방재시설 관리 : 779백만원

- 관람로 정비(판석 포장), 광한루 활주 및 서까래 보수공사 추진

◦ 광한루원, 관광지 시설물 개선 및 보수 : 66건 / 376백만원

- 승월교 특고압 수배전반 교체·청사초롱등 도색공사 추진을 통한 승월교 주변 미관개선

- 월매집 연지 노후 물레방아 교체, 관광지 내 배수시설 정비공사 등

◦ 솔바람길 힐링숲 가꾸기사업 완료

- 편백 205주 식재, 데크로드·계단(L=74.0M) 설치 및 데크 쉼터 조성

◦ 조경 전문 인력 채용으로 효율적 관광지 조경 관리 추진

- 조경수 전정 160주, 편백나무 이식 50주, 광한루원 및 관광지 조경관리 93,648㎡ 등

◦ 수준높은 공연문화 활성화를 위한 예술회관 리모델링 사업 추진(공정률30%)

□ 코로나19 안전한 관람을 위한 클린 방역 대응

◦ 코로나19 대응 손소독제 비치, 열 체크, 출입자 명부 작성, 시설 자체소독

◦ 코로나19 마스크 착용 안내 및 방송 : 수시

◦ 광한루원 회의실 활용 무더위 쉼터 운영 : 1개소

□ 문화가 있는 광한루원 운영 및 관광 홍보

◦ 계절별 트랜디한 관광 홍보 이벤트 추진

- 꽃그네 설치 (2개소), 장원급제 어사화 체험

◦ 대표관광지 포토존 명소(인기 포토스팟 위주) SNS 홍보 : 50건

◦ 남원시 한복문화 진흥을 위한 화인당 등 연계 사업 추진

□ 춘향테마파크 활성화를 위한 사업 추진

◦ 춘향테마파크 수목에 설치된 야간경관 철거(조형물 제외)

⇒ 전구 수명(전구 빛이 많이 희미해짐), 나무 생육을 고려해서 일부(수목) 철거

◦ 춘향테마파크 유지관리 정비 사업 : 11건 / 149백만원

◦ 향토박물관 특별·기획전시회 개최 : 3회

2021년 주요업무 추진실적

어린이과학체험공간 확충 지원사업 추진

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 5월 ~ 2022. 12월

◦ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000 시비 1,000)

◦ 위    치 : 광한루원 경외상가 5, 6, 7동

◦ 사업내용 : 어린이과학체험공간(실내 576㎡, 실외 511㎡) 등 조성

- 7세 이하 어린이 및 초등학교 저학년 이용 대상으로 눈높이에 맞는

과학체험 공간 조성

□ 추진실적

◦ 공모관련 기관방문 및 타당성 사전 설명 등 협조요청      : ‵21. 2 ~ 3월

- 과학기술정보통신부, 한국과학관협회 등 월 1회 총 2회 기관방문

◦ 어린이과학체험공간 확충 지원 사업 계획보고 및 공모신청 : ‵21. 3. 07.

◦ 1차 적격성 검토, 2차 서면평가, 3차 발표평가             : ‵21. 3. 17 ~ 25.

◦ 2021년 어린이과학체험공간 확충 지원 사업 현장실사  : ‵21. 4. 07.

- 과학기술정보통신부, 국립중앙과학관, 한국과학관협회 등 심사위원

◦ 2021년 어린이과학체험공간 확충 지원 사업 최종선정  : ‵21. 4. 08.

◦ 어린이과학체험공간 조성 사업 연구용역 시행 (70일)   : ‵21. 8. 10.

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 (건축, 전기, 소방, 통신, 장애인시설 등)  : ‵21.  8월

◦ 어린이과학체험공간 조성 사업 입찰 및 착공           : ‵21. 10월

◦ 어린이과학체험공간 조성 사업 준공                   : ‵22.  6월

◦ 어린이과학체험공간 개관식                           : ‵22. 7월중

항공우주천문대 바리스타 로봇 설치 사업 추진

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 8월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 100백만원(국비 70, 시비 30)

◦ 위    치 : 항공우주천문대 내

◦ 사업내용 : 바리스타 로봇 설치 1식

□ 추진실적

◦ 2021년 서비스로봇 활용 실증사업 계획보고 및 공모신청  : ‵21. 6. 30.

- 한국로봇산업진흥원 (산업통산자원부)

◦ 1차 적격성 검토, 2차 현장평가, 3차 발표평가            : ‵21. 7. 01 ~ 21.

◦ 2021년 서비스로봇 활용 실증사업 최종선정          : ‵21. 8. 09.

◦ 항공우주천문대 바리스타 로봇 조성 사업 시행       : ‵21. 8. 10.

□ 금후계획

◦ 남원시-한국로봇산업진흥원 업무 협약              : ‵21. 9월중

◦ GS글로벌(로봇기업) 남원항공우주천문대 현장 실사   : 협약 이후

◦ 남원항공우주천문대 바리스타 로봇 제작 및 설치     : ‵21. 9 ~ 10월

◦ 이벤트성 홍보 및 보도자료를 통한 관광객 유치      : ‵21. 10월 ~

솔바람길 힐링 숲 가꾸기 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 1 ~ 6월

◦ 사 업 비 : 150백만원

◦ 위    치 : 남원관광지 솔바람길

◦ 사업내용 : 편백 식재, 데크 추가 설치(L=74.0M)

□ 추진실적

◦ 현지조사 및 실시설계용역 추진               : ‵21. 1. 11. ~ 3. 05.

◦ 솔바람길 힐링숲 가꾸기(조경 식재) 준공       : ‵21. 3. 23. ~ 4. 02.

- 편백(H3.5×W1.5) 205주

◦ 솔바람길 힐링숲 가꾸기(데크) 준공            : ‵21. 3. 31. ~ 4. 27.

- 데크로드·계단(L=74.0M) 설치 및 데크쉼터 조성

□ 금후계획

◦ 하반기 하자점검 및 하자보수 실시            : ‵21. 9월 ~ 11월

◦ 지속적인 점검과 유지관리                    : 연중

문화가 있는 광한루원 관광객 유치

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021. 1 ~ 12월

◦ 총사업비 : 76백만원

◦ 위    치 : 광한루원 경내

◦ 사업내용 : 연중 이벤트 및 각종 전시회 등 활성화 운영

◦ 주요사업

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	일정	사업비	비고
	7건		76
자체	춘향이 프렌즈(마스코트) 운영	5~12월	41
	공연이 있는 오후 2시 운영	7~11월	17
	계절별 관광 포토존 이벤트 추진	3~12월	3
	체험 및 전시회(목판, 한시, 포스터, 사진전 등)	연중	3
	광한루원 이벤트 공연(플루트 공연)	20회	10
	춘향 VR체험관 공간 활용 한복무료대여	연중	2
유관	유관 부서 및 기관단체 행사·이벤트 지원 (신관사또 부임행차, 취타대공연 등 6종)	연중

□ 추진실적

◦ 자체 및 유관기관 공연 운영

- 자체공연 : 춘향이 프렌즈(마스코트)운영, 광한루원 예찬 시선 전시회 등

- 유관기관 : 신관사또 부임행차, 취타대 공연 등

□ 코로나-19 여파로 상설 공연 및 이벤트 행사 차질 발생

◦ 계절별 관광홍보 이벤트 추진 : 봄, 여름 / 꽃그네 설치, 장원급제 어사화 체험

◦ 대표관광지 광한루원 유명 포토존 홍보(SNS활용) / 50건

□ 금후계획

◦ 유관기관 및 부서 등 광한루원 연중 행사 추진           : 8 ~ 12월

◦ 계절별 관광객 유치를 위한 기획·홍보 이벤트 추진(3~4분기) : 8 ~ 12월

◦ 춘향VR체험관 이전 운영 (춘향관 뒤 영상관)             : 8 ~  9월

◦ 광한루원 베스트 여행지 SNS (인스타그램 등) 홍보 : 연중

◦ 야간 경관의 명품 야행과 문화공연을 접목한 야행 스토리 홍보 운영

항공우주천문대 선도적 과학체험 활성화

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영개요 : 1 ~ 12월 항공우주천문대 연중프로그램 운영

◦ 사업내용

프로그램명	대 상	주 요 내 용	비 고
8건
과학해설사 지원사업	시민	청년일자리 창출 인건비	국비공모선정
두드림 프로젝트	관내주민	찾아가는 과학관 운영	국비공모신청
1박2일 과학체험 활동	사회배려계층	1박 2일 캠프형 체험	〃
1박2일 체류형 프로그램	학교,청소년	1박2일 심화프로그램	시비
진로직업체험 프로그램	청소년	2시간 프로그램	〃
방학기간 주·야간 패키지	관람객	주간관람 및 야간관측	〃
2021년 개기월식 행사 2021년 부분월식 행사	시민,관광객	관람 및 설명, 관찰	2021. 5. 26. 2021. 11. 19.
청소년 온라인 과학캠프	사회배려계층	온택트 과학캠프 운영	여름‧겨울방학중

□ 추진실적

◦ 2021년 지역과학관 활성화 지원사업 및 과학해설사 공모 선정

- 항공우주천문대 인건비 지원(1건 / 1.4억원)

- 대 상 : 총 6명(항공우주천문대 4명, 춘향VR체험관 2명)

◦ 항공우주천문대 리모델링 사업 완료 : ‵21. 4. 10. 재개관

⇒ 전년도 대비 천문대 이용객 수 112% 증가, 세외수입 86% 증가

◦ 여름방학 주·야간 체험 패키지 운영          : 7. 27 ~ 8. 31

◦ 여름방학 과학체험활동(드론체험교실) 운영     : 8. 01 ~ 8. 31.

□ 금후계획

◦ 학교 및 청소년 단체 1박2일 프로그램 안내 우편물 발송 : 연중

◦ 하반기 11월 19일 부분월식 공개관측 행사 운영

◦ 지속적인 이벤트성 홍보를 통한 체험, 관측 등 이용객 유치 노력

◦ 코로나19 방역수칙 준수로 안전한 과학체험 프로그램 운영

전통보존과 관광 시설 정비(보조)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 광한루원 시설물 종합정비

◦ 주요사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업기간	사업비	비고
5건		779
광한루원 종합정비사업(관람로 정비)	2 ~ 12월	400	국도비보조
광한루 보수 공사(활주 및 서까래 주변)	3 ~ 8월	17
광한루원 월매집 초가이엉 잇기	11월	56
광한루 안전경비원 배치 및 방재시설 유지관리	연중	106
광한루원 동문확장	1 ~ 12월	200

□ 추진실적

◦ 광한루원 관람로 보수공사 설계용역 완료               : ‵21. 2. 17. ~ 4. 18.

◦ 광한루원 관람로 보수공사 문화재청 설계승인 요청      : ‵21. 4. 29.

◦ 광한루원 관람로 보수공사 원가심사 및 일상감사 요청   : ‵21. 5. 26.

◦ 광한루(활주 및 서까래 주변) 보수공사 설계용역 착수    : ‵21. 3. 08. ~ 5. 18.

◦ 광한루(활주 및 서까래 주변) 보수공사 설계승인 요청    : ‵21. 4. 29.

◦ 광한루원 동문확장공사 설계용역 착수                  : ‵21. 5. 13. ~ 7. 11.

◦ 광한루(활주 및 서까래 주변) 보수공사  완료            : ‵21. 8. 04.

◦ 광한루 안전경비원 배치, 방재시설 유지관리            : 연중

□ 금후계획

◦ 광한루원 동문확장공사 추진                            : ‵21. 8 ~ 12월

◦ 광한루원 관람로 보수공사 추진

- 기존 포장 철거 및 처리                               : ‵21. 8. 30. ~  9. 06.

- 경계석 거푸집 설치 및 기초 타설                      : ‵21. 9. 07. ~  9. 20.

- 관람로(판석) 설치                                  : ‵21. 9. 20. ~ 10. 01.

◦ 광한루원의 체계적․효율적인 전통경관 보존 및 시설 개선 : 연중

광한루원․관광지 편의시설 정비(자체)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사 업 명 : 광한루원, 관광지 시설물 종합정비

◦ 주요사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업기간	사업비	비고
		471
광한루원 시설물 유지보수	연중	50	시비
광한루원 우수관로 준설사업	1 ~12월	10
월매집 물레방아 교체공사	5 ~ 6월	10
관광지 시설물 유지보수	연중	40
관광지 내 소리길 도로측구 보수공사	1 ~ 9월	30
관광지 내 배수시설 정비공사	2 ~ 6월	70
남원관광지 덕음봉 운동기구 교체공사	3 ~ 4월	10
덕음산 솔바람길 조명 설치공사	3 ~ 5월	71
승월교 특고압 수배전반 교체공사	3 ~ 5월	60
상수도 긴급 복구공사	1 ~12월	10
요천 및 관광지 등 전기조명 보수공사	1 ~12월	80
양림단지 체련시설 설치	3 ~ 4월	10
사랑의 광장 인도블럭 교체공사	1 ~ 6월	20

□ 추진실적

◦ 광한루원, 관광지 시설물 개선 및 보수           : 66건 / 376백만원

- 남원관광지 덕음봉 운동기구 교체공사 완료      : ‵21. 3. 17.

- 승월교 특고압 수배전반 교체공사 완료          : ‵21. 4. 15.

- 양림단지 체련시설 설치 완료	: ‵21. 4. 22.

- 관광지 내 배수시설 정비공사 완료              : ‵21. 4. 28.

- 덕음산 솔바람길 조명 설치공사 완료            : ‵21. 5. 10.

- 월매집 물레방아 교체공사 완료	: ‵21. 5. 17.

- 사랑의 광장 인도블록 교체공사 추진            : ‵21. 7. 11.

□ 금후계획

◦ 각종 시설물 지속적인 보수 정비로 관람객 편의 제공 : 연중

- 광한루원 우수관로 준설, 소리길 도로측구 보수공사, 상수도 긴급 복구공사 등

조경 전문인력 효율적 정원 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 관리구역 : 광한루원, 춘향테마파크, 남원관광지, 교룡산국민관광지

◦ 채용인원 : 3명(전문 조경전담인력)

◦ 예 산 액 : 107백만원

◦ 사업기간 : 2021. 2 ~ 11월

◦ 주요업무 : 관광시설사업소 조경지 전반 관리(예초, 전정, 고사목 제거 등)

□ 추진실적

◦ 남원관광지, 솔바람길내 고사목 및 잡관목 제거      : 26,700㎡

◦ 교룡산국민관광지, 초화원 고사목 및 잡관목 제거    : 18,300㎡

◦ 광한루원 소나무 및 사랑의광장 반송 전지          : 120주

◦ 노암동 금암공원 잡관목 제거 및 정리(도시과 지원)  : 15,100㎡

◦ 솔바람길 편백나무 이식(금암공원⇒솔바람길)        : 50주

◦ 남원관광지, 테마파크, 초화원 등 조경지 예초       : 33,548㎡/2회

◦ 광한루원 서문 주차장 소나무 전정                 : 40주

◦ 기타 민원 신속 처리                              : 16건

- 표석 가림 수목 가지치기 및 전정, 덕음산 등산로 고사목 제거, 파손된 데크 수리 등

□ 금후계획

◦ 집중호우 및 태풍에 의한 조경지 피해 복구         : ‵21. 8 ~ 9월

◦ 광한루원 및 남원관광지 등 관목류 전정            : ‵21. 9 ~ 10월

◦ 남원관광지 등 잡목 및 고사목 제거                : ‵21. 10 ~ 11월

◦ 기타 민원 해소 등 : 연중

춘향문화예술회관 리모델링 공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 양림길 43(춘향문화예술회관 내)

◦ 사 업 비 : 49억원(국비 7, 도비 20, 시비 22)

◦ 사업기간 : 2021. 3 ~ 11월

◦ 사업내용 : 예술회관 건축물 및 대공연장 리모델링(686석) 공사

- 건축부분 : 무대증축, 객석교체, 냉난방시설 개선, 장비 반입구 변경

- 무대기계 : 무대기계교체, 음향반사판교체, 오케스트라 리프트 교체

- 기타부분 : 조정실(1층) 이전, 공연장 내부 도색등

□ 추진실적

◦ 예술회관 리모델링 컨설팅 완료	: ‵19. 12. 24.

◦ 예술회관 리모델링 사업 사전검토(국가)완료      : ‵20.  7.  8.

◦ 예술회관 리모델링 실시설계 완료(3억원)	: ‵21.  2. 19.

◦ 예술회관 리모델링 공사 착수(공정율 30%)       : ‵21.  5. 12.

- 건축, 전기, 소방, 통신, 무대기계(무대기계, 음향반사판)

□ 금후계획

◦ 예술회관 리모델링 공사 및 시운전 완료	: ‵21. 11월초

◦ 예술회관 기획공연 및 행사대관 실시	: ‵21. 11월중

춘향테마파크 및 향토박물관 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 주요시설 : 박물관, 동헌, 옥사정, 월매집 등(개장 : 2004. 5. 1.)

◦ 2021년 춘향테마파크 상설 프로그램 운영계획

프로그램 명	운영기간	주요 내용	비고
국악공연 /국악 체험장(2개소)	5 ~ 10월 (화 ~ 일)	국악공연 / 판소리, 사물놀이	관광과 협 조
국궁 체험장(박물관 옆)	5 ~ 11월 (화 ~ 일)	활쏘기 체험(성인용,어린이용)
관광기념품 전시(판매)	3 ~ 11월 (화 ~ 일)	남원관광기념품 전시 및 판매
뻥튀기 체험(전통초가 마당)	5 ~ 10월 (화 ~ 토)	관광객 뻥튀기 체험 및 시식
전통문화 체험장 운영(3개소)	연 중	제기차기, 투호, 굴렁쇠	자 체 운 영
‘어영차’줄다리기 체험 운영	연 중	가족, 단체, 관람객(자율 이용)
향토박물관 전시회	1 ~ 12월(상시전시)	특별전 및 기획전시(3회)

□ 추진실적

◦ 춘향테마파크 상설 주요 체험프로그램 : 국악공연·체험(42회), 국궁(활쏘기)체험(37회) 관광기념품판매(135회), 뻥튀기체험(51회), 제기차기·투호·굴렁쇠·줄다리기(수시 이용)

□ 코로나-19 관련 상설프로그램 참여인원 다소 떨어짐

◦ 남원 향토박물관 특별·기획전시회

- 만복사지 출토 유물 특별전 : ‵20. 10. 30. ~ ‵21. 3. 31(기와, 귀면와 등)

- 근대 남원인쇄문화 특별전 : ‵21.  5.  4. ~ 7.  4(유물 등 41점)

⇒ 1900년대 인쇄·출판된 서적들을 중심으로 전시(석판본, 연활자본)

- 남원의 불교 유적인 다양한 석불상(石佛像) 사진전 : ‵21.7.28.~ 9.1(25점 제작)

□ 금후계획

◦ 춘향테마파크 전통문화 상설 체험프로그램 운영 : 연중

◦ 남원향토박물관 기획전시(남원 출토 유물 대여전시 등) : 10 ~ 12월

춘향테마파크 유지관리 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 춘향테마파크 경내

◦ 사업내용 : 박물관 지하방수 공사, 관아 외 도장공사, 시설물 소파보수 등

◦ 2021 시설물 정비사업계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 량	사업비 (계획)	사업내용	비고 (실적)
4건		198		(75%)
춘향테마파크 주요시설 건축물 착색 및 도장공사	.대상 : 4개소 (관아,단심정,에스컬레이터, 영화세트장)	55	퇴색된 페인트 제거후 착색 및 도장공사	(60%)
향토박물관 전기실 무정전장치 교체, 누전 조명등 교체 공사	.무정전(UPS) 1식 .교체조명등 : 50등 (초롱등,조명등,가로등)	30	고장(사용중단) 무정전장치 교체, 누전 조명등 교체	(80%)
향토박물관 지하 외벽 방수 공사	.면적 : 260㎡	45	지하 외벽 방수, 터파기,배수관정비	(100%)
공원내 각종시설물 소파 보수 등	.대상 : 20개소	68	각종 시설물 유지 관리 보수(소파)	(70%)

□ 추진실적

◦ 향토박물관 무정전(UPS) 교체공사 추진            : ‵21. 2. 17. ~ 3. 08.

◦ 향토 박물관 외벽 방수 공사 추진                 : ‵21. 4. 29. ~ 6. 18.

◦ 춘향테마파크 시설정비 및 소파 보수 공사              : 9건 / 94백만원

□ 금후계획

◦ 춘향테마파크 주요시설 건축물 착색 도장공사 추진      : ‵21. 9 ~ 11월

◦ 춘향테마파크 각종 시설물 정비공사(소파 보수) 및 안전관리      :  수시