2022년 신규사업 발굴 내역

산림녹지과

□ 2022년 신규사업 발굴 목록

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사업 기간	총 사업비	2022년 사업비					비고
				계	국비	도비	시비	기타
	계		2,100	700	160	166	324	50
1	요천로 푸른 꽃길 조성	2022	300	300		150	150
2	백두대간생태전시관 운영 활성화 방안 시설보강	2022 ~2023	1,200	200	160	16	24
3	요천변 수국 꽃길 조성	2022	100	100			100
4	귀산촌인 산림소득작물 재배 지원조건 완화	2022	500	100			50	50

요천로 푸른 꽃길 조성

<산림녹지과 / 조경시설담당>

□ 필 요 성

◦ 많은 시민이 산책과 운동 공간으로 이용하고 있는 호반아파트 앞 요천변 인도에 그늘이 없어 시원한 그늘 및 시민 휴게공간 필요

◦ 기 조성된 생육이 불량한 장미화단을 장미터널로 기능을 확대하여 시민휴게공간과 색감있는 그늘 공간의 기능을 결합한 특색 있는 시민공간 필요

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 위 치 : 도통동 628번지일원(호반아파트 앞 요천변 인도) 연 장 : 약300m 정도 현 실 태 : 가로수 없이 포장되어 꽃화분으로 대체되어있음 현 황 : 기 조성되어있는 장미화단도 화분에 식재되어 생육이 불량한 상태임

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업지역 : 도통동 628번지 일원

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사 업 비 : 300백만원 (도비 150 시비 150)  ※ 도시숲 예산 활용

◦ 사업내용 : 가로수 식재(왕벚나무 30주), 가로수 주변 다년생 관목류(장미, 목수국, 홍가시나무 등) 및 휴게공간 조성 8개소 등

※ 산출근거

- 가 로 수 : 왕벚나무 22주×506,075원(H4.0×B12)/주 = 11,133,650원(8m간격 식재)

왕벚나무 8주×109,021원(H2.5×B 5)/주 =  872,168원(가로등 하부 휴게화단식재)

- 다년생 관목류 : 홍가시나무 30주×8개소×40,162원(H0.6×W0.3)/주 = 9,638,880원

목수국(라임라이트) 50주×8개소×25,000원(H1.0×W0.2)/주 = 10,000,000원

장미 60주×8,300원(5년생)×22개소 = 10,956,000원

- 휴게공간 조성 : 화단 및 평의자, 흙채움 등(8개소×9백만원/개소당 = 72,000,000원)

- 가로수 화단조성 : 화단 및 흙채움 등(22개소×3백만원/개소당 = 66,000,000원)

- 장미터널 조성 : 화단 및 흙채움, 지지대 등(22개소×5백만원/개소당 = 110,000,000원)

- 실시설계비 : 13,000,000원

□ 추진계획

◦ 사업계획 수립 및 실시설계 용역                      : 2022. 1. ~  3월

◦ 사업시행                                            : 2022. 4. ~ 10월

◦ 사후관리                                           : 계속

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	300		300	300
국 비
도 비	150		150	150
시 비	150		150	150
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

백두대간생태전시관 운영 활성화 방안 시설 보강

<산림녹지과 / 백두생태담당>

□ 필 요 성

◦ 코로나19로 체험과 관광객 입장제한 및 시설 노후화와 볼거리 미흡으로 입장객 및 입장수입 현저히 감소

◦ 현 관광 트랜드 적용한 체험시설 확대 및 시설보강 등으로 천혜자원인 지리산을 접목한 다양한 체험시설 필요

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 위 치 : 운봉읍 운봉로 151 (2016.4.26.개관) ◦ 방문인원 : 23,815명 / 121백만원 (21.7월말현재) (전시관, 숙박시설, 캠핑장) ◦ 현 실태 : 시설 노후화 및 체험시설, 휴게공간 부족으로 재방문률 저조

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 백두대간생태교육장 전시관 운영 활성화 방안 시설 보강사업

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 1,200백만원 (국비 660  도비 16  시비 524)

◦ 사업내용 : VR체험시설(자이로,페러글라이딩,플라잉젯), 무인발매시스템, 휴게공간(카페시설)

《세 부 추 진 사 업》

① 現 관광 트랜드에 맞는 VR체험시설 구축

- 사업기간 : 2022 ~ 2023년

- 소요예산 : 10억원 정도 (국·시비)       ※ 산림청 예산요구

·(시설비) VR체험시설 및 기획전시실 바닥보수 : 8억

·(운영비) 전시관 기획 전시행사 및 운영비    : 2억(매년지원)

- 사업내용 : VR체험시설(자이로 1대, 페러글라이딩 5대, 플라잉젯 5대), 키오스크 1식

- 사업효과 : 방문객 재방문률 증가, 체험시설로 체류시간 연장

자이로 VR체험	페러글라이딩 VR체험	플라잉젯 VR체험	키오스크 (무인발매시스템)

※ VR 체험 : 육모정↔정령치↔뱀사골↔여원제 구간 등의 자동차 도로를 VR영상으로 제작, 속도감있고 스릴있는 체험 구성

② 휴게공간 (카페시설) 조성

- 사업기간 : 2022년 (총면적 : 388㎡)

- 소요예산 : 2억원 정도(국·도·시비)   ※ 자활사업 예산 (주민복지과)

- 사업내용 : 전시관 내(1층) 음식점 → 카페시설로 리모델링

- 사업효과 : 전시관 관람 & 카페 이용 ⇔시너지 효과  (카페이용 젊은층 SNS 홍보 유도)

※ 사례 : 김병종미술관 카페,  남원 아담원(정원)

현) 음식점 전경	카페시설 시뮬레이션(안)
	내부	외부

□ 추진계획

◦ 남원자활지원센터 연계 카페시설 입지여건 조사(프랜차이즈)  : 2021. 7. ~

◦ 카페조성 사업계획 수립 및 실시설계              : 2022. 1. ~ 3월

◦ 카페 조성사업 시행                              : 2022. 4. ~ 7월

◦ 백두대간생태전시관 활성화방안 보강사업 국가예산확보 추진 : 2021. 8. ~ 2022년

◦ VR체험시설 구축 및 무인발매시스템 사업시행     : 2023. 1. ~ 12월

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	1,200		1,200	200	1,000
국 비	660		660	160	500
도 비	16		16	16	-
시 비	524		524	24	500
자부담

□ 행정절차 이행[계획]

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

요천변 수국 꽃길 조성

<산림녹지과 / 녹지관리담당>

□ 필 요 성

◦ 요천변 인도 화단 내 수국 꽃길을 조성하여 남원 방문 관광객들에게 볼거리 제공 및 아름다운 가로경관 조성

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 위 치 : 쌍교동 346번지 일원(요천변/동림교 ~ 승사교 구간) 연 장 : 약1.5km 정도 현 실 태 : 관광객 및 시민들의 통행량이 많은 요천변 화단에 잡목·잡풀 번식으로 관리가 어려운 실정임 현 황 : 요천변에 기 식재된 벚나무, 철쭉 낙화(3 ~ 5월) 이후 감상할 수 있는 수목 식재가 필요함

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 위    치 : 쌍교동 346번지 일원(요천변/동림교 ~ 승사교 구간)

◦ 사 업 량 : 1.5km

◦ 사업기간 : 2022. 2. ~ 11월

◦ 사 업 비 : 100백만원 (시비 100)

◦ 사업내용 : 구역 내 관목(목수국)을 식재하여 아름다운 수국길 조성

※ 산출근거

- 실시설계 및 기반 조성(복토 등) : 20,000,000원

- 관목 식재 : 목수국 4,000주×20,000원(H1.0×W0.6)/주 = 80,000,000원

□ 추진계획

◦ 실시설계                                         : 2021. 11. ~ 12월

◦ 사업시행                                         : 2022. 2. ~ 11월

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	100		100	100
국 비
도 비
시 비	100		100	100

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

귀산촌인 산림소득작물 재배 지원조건 완화

<산림녹지과 / 산림소득담당>

□ 필 요 성

◦ 현재 해당 작물을 재배하고 있는 임업인에 한해서 지원을 해주고 있어 신규 귀산촌인이 산림소득 재배 지원사업 대상자로 선정되기는 어려움.

◦ 남원시 인구 및 임업인 증대‧조기정착을 위하여 산림소득작물 지원사업이 필요함.

	〈 현실태 및 현황 〉
◦2021년 산림소득작물 재배지원 현황(보조 50%, 자담 50%) - 참두릅(11농가, 보조기준 17,709천원 지원) - 산마늘(4농가, 보조기준 16,370천원 지원) - 곤달비(6농가, 보조기준 14,045천원 지원) ※지원조건 : 현재 임산물을 재배하고 있는 임업인

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 대 상 자 : 남원시에 주소를 둔, 5년 미만 귀산촌인(산림소득작물 미재배자도 지원가능)

◦ 사업기간 : 2022년 1 - 12월

◦ 사 업 비 : 100백만원 (시비50, 자부담50)

◦ 증빙방법 : 남원시 전입신고증

◦ 사업내용 : 두릅, 산마늘, 곤달비 등 산채류 묘목 50% 지원

□ 추진계획

◦ 사업 희망자 수요조사 및 사업신청 : 2022. 1. ~ 2월

◦ 사업 대상자 확정 및 사업 시행    : 2022. 3. ~ 10월

◦ 사업 완료 및 정산                : 2022. 11월

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	500	-	500	100	100	100	100	100
국 비
도 비
시 비	250	-	250	50	50	50	50	50
자부담	250	-	250	50	50	50	50	50

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
X	X	X	X	X