2022년 신규사업 발굴 내역

일자리경제과

□ 2022년 신규사업 발굴 목록

(단위:백만원)

연번	사 업 명	사업 기간	총 사업비	2022년 사업비					비고
				계	국비	도비	시비	기타
	계		7,183	7,028	2,211	1,512	3,100	205
1	중소유통공동도매물류센터 증축	2022	1,950	1,950		1,170	580	200
2	소상공인 상가 환경개선지원	2022	200	200			200
3	기간제 인력 공공일자리사업 대체 운영	2022	4,233	4,233	1,911	252	2,070
4	사회적경제기업 온라인판매 지원	2022	100	20			20
5	개별가구 LPG소형저장탱크 지원	2022	100	25			20	5
6	신중년 일자리 발굴로 도시 신중년의 ‘남원행’	2022	600	600	300	90	210

중소유통공동도매물류센터 증축사업

<일자리경제과 / 경제담당>

□ 필 요 성

◦ 남원지역 유통환경 변화에 따른 물류센터 역할 강화 필요

※ 품목 확대(주류, 공산품 ⇒ 정육, 농산물), 소상공인 이용자 확대

◦ 물류센터 진열공간 확장 및 소포장 공급을 위한 내부시설 필요

	〈 중소유통공동도매물류센터 현황〉
◦ 위 치 : 남원시 요천로 2075-14 ◦ 규 모 : 건축연면적 3,213.43㎡(건물2동) ◦ 주요시설 : 도매․배송장, 냉동냉장 창고, 사무실, 공병창고(부속사) ◦ 개 소 일 : 2012. 4. 24 / 매출액 54억원(‘20년) ◦ 운영단체 : 전북남원슈퍼마켓사업협동조합(조합원 765명)

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 1,950백만원 (균특도비 1,170, 시비 580, 자부담 200)

◦ 사업내용

- 건물증축(990㎡ ), 시설공사(저온시설, 랙 시설 등)	: 1,860백만원

- 물류장비(지게차 및 전산장비, 카트류)	: 90백만원

□ 추진계획

◦ 2022년 균특 예산 확보	: 2021. 10.

◦ 건립운영위원회 구성 및 개최	: 2021. 12.

◦ 건축허가 및 공사 착공, 물류장비 구매	: 2022. 2. ~ 5.

◦ 준공 및 정산 완료	: 2022. 12.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	1,950		1,950	1,950
국 비
도 비	1,170		1,170	1,170
시 비	580		580	580
자부담	200		200	200

□ 행정절차 이행 : 해당없음.

소상공인 상가 환경개선지원사업 추진

<일자리경제과 / 경제담당>

□ 필 요 성

◦ 노후시설물 환경개선을 통한 소상공인의 경영 안정 도모

◦ 상가의 환경개선을 통한 위생 및 청결한 관광도시 이미지 제고

	〈 남원 소상공인 현황 〉
◦ 소상공인 현황 : 3,500여개소 ◦ 소상공인 기준 : 광업․제조․건설․운수–10인미만, 기타-5인미만 ◦ 소상공인 주요업종 : 도․소매업, 음식업, 숙박업, 개인서비스업 등

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 지원대상 : 신청일 기준 1년이상 남원시 거주 및 해당사업 영위자

◦ 지원기준 : 총 사업비의 50% 범위내, 최고 1천만원까지 지원

◦ 사 업 량 : 20 ~ 30개소(점포형)

◦ 사 업 비 : 200백만원 (시비 100%)

◦ 선정방법 : 소상공인 지원 심의위원회 구성 및 심의

◦ 사업내용 : 소상공인 상가 환경개선(안전관리, 화장실, 주방, 실내, 간판 등)

□ 추진계획

◦ 소상공인 상가 환경개선사업 추진계획 수립	: 2022. 1.

◦ 소상공인 심의위원회 구성 및 사업 신청공고	: 2022. 2

◦ 사업신청 공고 및 접수, 대상자 선정, 사업추진	: 2022. 3 ~ 11

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	200		200	200
국 비
도 비
시 비	200		200	200
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

기간제 인력 공공일자리사업 대체 운영

<일자리경제과 / 일자리지원담당>

□ 필 요 성

◦ 시비 부담이 많은 부서별 기간제 채용을 공공일자리로 대체 운영

◦ 코로나19로 인한 청년, 여성, 장애인 등 취약계층 등에 공공일자리를 제공하여 생계지원 및 지역경제 활력 제고

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 2021년 남원시 공공일자리 현황 : 1,213명 11,590백만원 - 공공일자리(희망근로,공공근로,신중년,청년인턴,대학생 등) : 857명, 4,233백만원 - 부서 기간제 사역현황(‘21. 6월기준) : 356명, 7,357백만원

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

◦ 공공일자리 사업비 : 4,233백만원정도(국비 1,911, 도비 252, 시비 2,070) ※ 2021년 기준

◦ 사업내용

‣ 단순 일자리 ⇒ 공공일자리사업으로 대체

‣ 전 문 인 력 ⇒ 신중년 경력형 일자리사업 공모(사업별 분석)

※ 1차 공공일자리 대체 검토 결과 (붙임)

(단위:명,백만원)

합 계		가 능		불 가		검 토		비고
인원	사업비	인원	사업비	인원	사업비	인원	사업비
356	7,357	94	1,712	203	3,860	59	1,110

(불가의 경우 전문인력이 필요한 일자리로 신중년 경력형 일자리 사업 공모에 반영 노력)

□ 추진계획

◦ 실과소, 읍면동 기간제 인력 실태조사	: 2021. 8. 16. ~ 8. 20.

□ 실태조사 후 대체가능 인력은 2022년 공공일자리사업 예산 반영

◦ 실과소, 읍면동 기간제 인력 채용 계획시 「일자리지원담당」사전 협조

□ 공공인력으로 대체 가능 여부 판단하여 사역 가부 결정

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	8,466	4,233	4,233	4,233
국 비	3,822	1,911	1,911	1,911
도 비	504	252	252	252
시 비	4,140	2,070	2,070	2,070
자부담

* 2021년 기준 작성

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

참고		분야별 대체 검토결과

분 야	업무내용	인원	사역기간	인건비 (백만원)	공공일자리 대체 검토결과
계		356		7,357
청소원	시설물 및 화장실 청소	30	5개월(상시)	417	가능
행정보조	업무 보조	53	3개월(상시)	1,108	가능
육아휴직대체	육아휴직 대체 근무	11	필요시	187	가능
방역·소독	방역초소, 소독사업 등	23	5~9개월	201	검토
공공시설물 관리	시설 운영 및 보조	26	연중상시	625	검토(사업별검토)
산림 분야	산림병해충예찰방제단, 양묘장 생산관리 등	41	9개월(상시)	1,080	불가 (전문인력)
농기계 분야	농기계임대사업 운영	10	11개월	284	검토 (신중년 경력형)
농업 분야	씨감자 및 인공종묘생산 등	17	5~12개월	378	불가 (전문인력)
교육 분야	아동복지교사, 판소리 강사 등	31	10개월(상시)	433	불가 (전문인력)
중간지원조직	공동체지원센터, 도시재생지원센터	14	연중상시	480	불가 (전문인력)
급식도우미	지역아동센터 급식도우미	26	연중상시	147	불가 (전문인력)
관광 분야	광한루원 수표원 등	8	6~11개월	185	불가(고객응대)
의료업무종사자	코로나19 백신접종, 치매관리사업 등	44	3개월(상시)	1,157	불가 (전문인력)
기타	남원시청복싱부 등	22	연중상시	675	불가 (전문인력)

사회적경제기업 온라인판매 지원사업

<일자리경제과 / 사회적경제담당>

□ 필 요 성

◦ 코로나19로 사회적경제기업 비대면 제품판로 및 홍보를 위한 판매지원 필요

◦ 최근 소비행태에 맞춰 라이브 쇼핑 등을 통한 상품판매 지원 강화

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 사회적경제기업 현황 : 128개(사회적기업 15, 마을기업 9, 사회적협동조합 15, 협동조합 89) ◦ 온라인채널 판매 : (유)메밀꽃피는항아리(장현미), 4월(1회) 5,300천원 매출, 현대쇼핑 - 지리산처럼 영농조합법인, 웅치마을, 지리산 황치마을 : 매출은 적지만 여러 채널 시도 - 그 외는 소극적이거나 온라인채널에 판매활동 없음 ◦ 2021 사회적경제기업 온라인 상세페이지 제작 지원 : 13개업체(30개상품), 10백만원

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022. 2 ~ 5.

◦ 사업대상 : 10개업체정도 (온라인 판매가능 제품 업체)

◦ 사 업 비  : 20백만원(시비) ※ 웹디자인, 쇼호스트, 장비(카메라,조명,케이블)대여 등

◦ 사업내용

- 사회적기업 네이버 쇼핑()을 위한 스마트스토어 입점 지원

- 사회적기업 제품 네이버 라이브커머스() 시범 지원

※ 네이버 온라인채널 : 접근성 용이, 이용자 최다, 수수료 저렴

□ 추진계획

◦ 네이버 스마트스토어 입점 업체 선정                   : 2022. 2

◦ 네이버 스마트스토어 메뉴 및 디자인 기획              : 2022. 3

◦ 네이버 라이브커머스(네이버 쇼핑라이브 등)방송 송출    : 2022. 5

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	100		80	20	20	20	20	20
국 비
도 비
시 비	100		80	20	20	20	20	20
자부담

□ 행정절차 이행(계획)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
x	x	x	x	x

개별가구 LPG소형저장탱크 지원사업

<일자리경제과 / 에너지담당>

□ 필 요 성

◦마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업과 병행추진 하여 예산절감 및 수요분산

◦도시가스 미공급지역 가구의 편의성 확보 및 연료비 부담완화 등 에너지 복지 향상

	〈 현실태 및 현황 〉
◦마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업의 사업량이 매년 2~3개소로 수요를 충족하지 못하고 있어 사업완료까지 장기간 소요(2021년 17개 마을 신청 2개마을 선정) ◦시설비 가구당 1~1.5천만원으로 과다 소요(자부담 5%)

□ 사업개요 및 주요내용

◦사업지역 : 도시가스 미공급 지역(읍, 면)

◦사업기간 : 2022. 2. ~ 8.

◦사 업 비 : 25백만원 (시비 20, 자부담 5)

◦사업내용

- LPG소형저장탱크(250kg) 설치 시 가구당 2,000천원 정액 지원(총 10가구 정도)

- 저소득층 및 귀농귀촌 가구 우선지원

□ 추진계획

◦수요조사 실시	: 2021. 10.

◦사업대상자 선정 및 사업추진	: 2022. 2. ~ 8.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	100		100	25	25	25	25
국 비
도 비
시 비	80		80	20	20	20	20
자부담	20		20	5	5	5	5

□ 행정절차 이행(계획)(해당: 날짜기재, 해당없음: ×)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×	×	×	×

신중년 일자리 발굴로 도시 신중년의 ‘남원행’

<일자리경제과 / 일자리지원담당>

□ 필 요 성

◦ 인적자원으로서의 잠재력(자산, 경력 등)이 큰 도시 신중년의 새로운 자원을 지역사회에 기여할 수 있도록 일자리와 인구유입에 기여.

◦ 은퇴 후 귀농․귀촌 예정인 타지역 신중년들의 전입정착과 생계안정에 도움

	〈 현실태 및 현황 〉
◦ 신중년은 은퇴를 준비중인‘5060 세대’로 전체 인구의 1/4 차지 ◦ 2020년 기준 남원시 귀농귀촌 : 가구 650, 인구 831명. ※ 신중년 귀촌인구(50~60대)는 36.4% 차지

□ 사업개요 및 주요내용

◦ 사업기간 : 2022. 1 ~ 2022. 12

◦ 사 업 비 : 600백만원 [국비(50%) 300, 도비(15%) 90, 시비(35%) 210]

◦ 사업내용 :「신중년경력형 일자리사업(고용노동부)」참여자 지역제한 없이 모집하여, 타지역 신청자의 경우 1개월 이내 남원시 주민등록 전입 조건 참여자 확정

□ 추진실적(2021년)

◦ 사 업 비 : 1,010백만원 [국비(50%) 505, 도비(15%) 151, 시비(35%) 354]

◦ 사업내용 : 49명(지역서비스 사각지대 33, 농업기술센터 매니저 8, 작은도서관북코디 8)

□ 인구유입 실적 : 3명(타지역 참여자 남원시 전입)

□ 추진계획

◦ 2022년 신중년 경력형 일자리사업 공모	: 2021. 8. 27

◦ 2022년 신중년 경력형 일자리사업 공모 확정	: 2021. 10

◦ 2022년 신중년 경력형 일자리사업 사업추진	: 2022.1.~12.

□ 소요재원 조성계획

(단위 : 백만원)

재원 구분	합계	기투자 (～‘21)	재원 투자계획					‘26년 이후	비고
			소계	‘22	‘23	‘24	‘25
합 계	600		600	600
국 비	300		300	300
도 비	90		90	90
시 비	210		210	210
자부담

□ 행정절차 이행(계획)(해당: 날짜기재, 해당없음: ×)

용역과제 심의	사회보장협의	중기지방재정계획	지방재정투자심사	공유재산심의
×	×		×	×