2022년도 국가예산확보 추진실적

관광시설사업소

□ 사업현황(총괄)

(단위 : 억원)

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	2	22.00	13.40	1.80	6.80	0.00	13.40	5.00	5.00
국가사업
국고보조	2	22	13.4	1.8	6.8		13.4	5	5
기 금
균 특
특 교 세

구 분	건수	총 사 업 비					국 비 요구액	부 처 반영액	기재부 반영액
		계	국비	도비	시비	기타
총 계	2	22.00	13.40	1.80	6.80	0.00	13.40	5.00	5.00
계속사업	1	12	8.4	1.8	1.8		8.4
신규사업
공모사업	1	10	5		5		5	5	5

남원시어린이과학체험공간 조성 사업

【국고보조·공모】

□ 개    요

◦ 위    치 : 광한루원 경외상가 5,6,7동

◦ 사업기간 : 2021. 4 ~ 2022. 12. (2년)

◦ 사 업 량 : 남원시어린이과학체험공간 조성 (실내576㎡, 실외511㎡)

◦ 총사업비 : 20억원(국비10, 시비10)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00
국 비	10.00		5	5
도 비	0.00
시 비	10.00		5	5
기 타	0.00

‘22 국비 요구액 : 5억원	부처 반영액 : 5억원	기재부 반영액 : 5억원

□ 추진실적

◦ 어린이과학체험공간 확충 지원 사업 계획보고 및 공모신청  : ‵21. 3. 07.

◦ 2021년 어린이과학체험공간 확충 지원 사업 최종선정   : ‵21. 4. 08.

◦ 어린이과학체험공간 조성 사업 연구용역 시행 (70일)    : ‵21. 8. 10.

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 (건축, 전기, 소방, 통신, 장애인시설 등)  : ‵21. 8월 ~

◦ 어린이과학체험공간 조성 사업 입찰 및 착공           : ‵21.10월 ~

◦ 어린이과학체험공간 조성 사업 준공                   : ‵22. 6월 ~

◦ 어린이과학체험공간 개관식                          : ‵22. 7월중

광한루원 종합정비사업

【국고보조·계속】

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 요천로 1447, 광한루원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2024

◦ 사 업 량 : 광한루원 종합정비계획

- 보존 : 광한루 보수, 춘향사당 보수, 남문 보수 등

- 활용 : 관람로 정비, 북문개축, 서문보수, 상한사 설치, 담장낮추기 등

- 정비 : 비석군 주변정비, 연지정비, 지기석정비, 대나무 정비 등

◦ 총사업비 : 58.1억원(국비 40.67, 도비 8.71, 시비 8.72)

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	2021	2022	2023이후
계	58.09	7.50	4.70	12.00	33.89
국 비	40.67	5.25	3.3	8.4	23.72
도 비	8.71	1.125	0.7	1.8	5.08
시 비	8.72	1.125	0.7	1.8	5.09
기 타	0.00

‘22 국비 요구액 : 8.4	부처 반영액 : 추진중	기재부 반영액 : 추진중

□ 추진실적

◦ 광한루원 종합정비계획 승인	: ‵17. 12.

◦ 광한루(활주 및 서까래 주변) 보수공사 완료	: ‵21. 7. 12. ~ 8. 3.

◦ 광한루원 관람로 보수공사 추진	: ‵21. 6. 24. ~ 11. 21.

□ 금후계획

◦ 실시설계 추진	: 2022.  1월 ~  4월

◦ 현상변경 설계승인	: 2022.  4월

◦ 사업추진	: 2022.  5월 ~ 12월

- 관람로 정비, 원지정비, 담장낮추기, 지기석 발굴 및 정비 등