2022년도 제2차 정기분 공유재산 관리계획안

의안 번호			제출연월일 : 제 출 자 : 제안설명자 :	2021. 11. . 남 원 시 장 자치행정국장

1. 제안이유

❍ < 고소바위공원 국민여가 캠핑장 조성 - 관광과 >

고소바위공원은 자연발생 야영장으로 캠핑을 즐기는 관광객들의

증가로 인한 소음, 쓰레기 무단투기, 교통혼잡 등의 문제가 발생하고

있어, 법적 기준에 적합한 캠핑장 조성을 위한 부지를 매입하여

방문하는 관광객이 안전하고 편리하게 이용하고, 인근 주민들의

피해를 예방하고자 함.

❍ < 산내면 국민체육센터 건립 - 교육체육과 >

젊은 세대 유입 및 주민의 여가 활동 증가로 인한 문화

체육시설 수요 대응을 위해 국민체육센터를 건립하여 지역민이 건강증진과

지역의 체육복지 증진을 실현하고자 함.

2. 주요골자

❍ 취득하고자 하는 재산 –  5건        4,305㎡ --    3,029,990천원

․ 토   지 :   4필지                  3,315㎡ --         29,990천원

-	고소바위공원 국민여가 캠핑장 조성	----	4필지	3,315㎡	29,990천원

․ 건   물 :   1동                      990㎡ --  3,000,000천원

-	산내면 국민체육센터 건립	----	1동	990㎡	3,000,000천원

3. 법적근거

◦ 공유재산 및 물품관리법 제10조 및 같은법 시행령 제7조

◦ 남원시 공유재산 관리조례 제12조

4. 금후계획

◦ 남원시의회 의결

◦ 공유재산의 취득

고소바위공원 국민여가 캠핑장 조성

		필 요 성

◦ 고소바위공원은 자연발생 야영장으로 자연환경이 우수하고 일부 편의시설이 갖춰져 캠핑을 즐기는 사람들이 늘고 있으나 소음, 쓰레기 무단투기, 교통혼잡 등의 문제가 발생하고 있음.

◦ 캠핑장을 방문하는 사람들이 편리하게 이용할 수 있고, 지역주민에게 피해가 없도록 법적 기준에 적합한 시설을 조성하여 체계적인 관리·운영이 필요함.

		사업개요

◦ 사 업 명 : 고소바위공원 국민여가 캠핑장 조성사업

◦ 위    치 : 남원시 산동면 대기리 404-1번지 일원

◦ 총사업비 : 1,030백만원(도비 500, 시비 530)

◦ 사업내용 : 국민여가 캠핑장 1개소 조성

◦ 면    적 : 9,720㎡

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

		소요예산

◦ 토지매입비 :   30백만원

◦ 공  사  비 : 1,000백만원

		위 치 도

		현황사진

		금후계획

◦ 감정평가 및 보상 추진	: 2022. 01. ~ 03.

◦ 고소바위공원 국민여가 캠핑장 조성	: 2022. 01. ~ 12.

산내면 국민체육센터 건립

		필 요 성

◦ 젊은 세대 유입 및 주민의 여가 활동 수요증가로 인한 문화체육시설을 조성하여 지역의 체육복지와 지역민의 건강증진을 도모하고자 함.

		사업개요

◦ 사 업 명 : 산내면 국민체육센터 건립사업

◦ 위    치 : 전북 남원시 산내면 장항리 209번지 외 5필지

◦ 총사업비 : 30억원 (국비 10, 시비 20)

◦ 사업내용 : 국민체육센터 1동 및 부대시설 건립

◦ 면    적 : 연면적 990㎡(1동)

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.

		소요예산

◦ 국민체육센터 건립 공사비	: 2,610,000천원

◦ 용역비, 감리비 등	: 390,000천원

		금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2022.  1. ~ 2022. 5.

◦ 공사 계약심사 및 입찰	: 2022.  5. ~ 2022. 6.

◦ 공사발주 및 시행	: 2022.  6. ~ 2022. 12.

		위 치 도

		현황사진