2022. 1.

2022년 주요업무 계획

산 림 녹 지 과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 주요업무 결산

□ 2022년 중점 추진방향

□ 2022년 주요업무 계획

◦ 임도사업

◦ 등산로 정비사업

◦ 산불방지대책

◦ 산림병해충 방제

◦ 보호수 및 노거수 등 관리

◦ 미세먼지 차단숲 조성사업

◦ 함파우 지방정원 조성사업

◦ 복지시설 나눔숲 조성사업

◦ 무궁화동산 조성사업

◦ 도시숲 및 가로수 조성

◦ 스마트가든볼 설치

◦ 산림소득 증대사업

◦ 조림사업

◦ 정책숲가꾸기사업

◦ 목재산업시설 지원사업

◦ 백두대간생태교육장 운영 활성화 추진

◦ 조경수 관리 전담팀 운영

◦ 요천변 등 꽃단지 조성 및 관리

일  반  현  황

□ 기    구

														산림녹지과장
														이 승 재
산림경영담당					산림보호담당							조경시설담당								산림소득담당							백두생태담당						녹지관리담당
안 성 순					서 상 훈							안 길 재								김 인 규							김 병 철						안 도 엽
산사태취약지역 관리 산지수해복구 사방사업 시행․관리 임도개설 및 관리 숲길(등산로) 정비 공유재산관리 산지전용허가·협의 자연휴양림관리 국가산림문화자산 지정 및 관리					산불방지대책추진 토석채취허가·지도 산림피해단속·사건 산림병해충방제 보호수 관리 산림보호구역관리 재해우려목제거사업 생활권수목진료 소나무류생산확인							함파우지방정원 미세먼지차단숲 도시숲조성·관리 가로수조성·관리 스마트가든볼 복지시설나눔숲 무궁화식재사업 국가공모사업 도시림심의위원회								임업후계자 조림사업추진 산림경영계획인가 산림소득사업 백두대간주민지원 숲가꾸기사업 목재산업시설지원사업 농림사업·농특회계 마을사업							백두대간생태교육장 운영 및 관리 ∘전 시 관 ∘체험·휴양시설 ∘생태관광에코롯지 ∘국민여가캠핑장 ∘고원선수촌훈련장						가로수관리 조경수전담팀운영 가로변병해충방제 꽃단지 조성·관리 (요천변,향기원, 핑크뮬리,구역사) 시양묘장운영관리 공공산림가꾸기 생활피해민원처리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	22	1	6	4	7	4
현 원	22	1	8	7	4	2	19
증 감	-	-	2	3	△3	△2

※ 비    고 : 19명(청원경찰 6, 공무직 9, 임기제 4)

※ 육아휴직 : 1명(녹지7급) 현원 포함

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 7.28.~8.11. 호우피해지 신속한 조사 및 생활권 피해지 조기 복구를 통한 시민의 생명 보호와 건강한 산림환경 조성으로 산림서비스 제공 ◦ 봄·가을철 산불대책본부의 체계적 운영으로 산림피해 최소화 ◦ 복지시설나눔숲, 도시림, 가로수 등 다양한 숲을 조성하여 쾌적한 생활환경과 아름다운 녹지경관 제공 ◦ 코로나19 확산에 따른 방역수칙 준수 및 단계별 운영 관리로 이용객 만족도･신뢰도 제고

□ 건강한 산림자원 육성과 산지이용 강화

◦ 임도사업 : 신설 및 유지보수 3개소(대강면 사석리 등) : 121.9km, 1,192백만원

◦ 신선자락길 등 등산로 유지 및 관리                  : 136km, 579백만원

◦ 경제림·미세먼지저감 등 조림사업                   : 248㏊, 1,346백만원

◦ 조림지가꾸기 등 숲가꾸기 사업                 : 1,174㏊, 1,851백만원

◦ 토석채취 허가 및 관리	: 24개소(허가지 10, 복구지 14)

◦ 불법 산림사건 처리 및 복구	: 67건 / 45,776㎡

□ 자연재해로부터 사계절 안전한 산림 조성

◦ 20. 7. 28. ~ 8. 11. 호우피해지 복구 추진  : 산사태 118.67ha, 임도 30.1km 등

◦ 사방댐 등 사방사업(※산림환경연구소 시행) : 15개소, 3,841백만원

- 사방댐 4, 계류보전 8, 유역관리 1, 산지사방 2

◦ 봄철·가을철 산불방지대책본부 운영(2.1. ~ 5. 15./11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 소나무 재선충병 방제 사업                    : 100.1ha / 195백만원

◦ 생활권 재해우려목 제거사업	: 677본 / 97백만원

◦ 산림병해충 예찰·방제(연중), 재선충병 검경의뢰  : 1,109건

◦ 소나무 생산 확인표 발급	: 237건

□ 생활권 탄소흡수원 확보 및 관리

◦ 도시숲‧명상숲‧가로수 조성 : 1.55ha/9.4㎞/1,034백만원(소나무 외 42종 53,468주)

- 도시숲 1.35ha/519백만원, 명상숲 0.2ha/57백만원, 가로수 9.4㎞/458백만원

◦ 복지시설 나눔숲 조성(포도원) : 179백만원(녹색자금)

◦ 조경수 전담팀 운영 전지작업 : 요천로 등 54개소, 소나무 등 51종 708,830주

◦ 시가지 꽃단지 조성 및 관리 : 덕음산 오감만족 숲 등 4개소, 114,221㎡

□ 소득창출을 위한 산림소득 증대 지원

◦ 임산물 상품화, 유통기반, 생산기반 등 5개 사업      : 1,431백만원

◦ 백두대간 주민소득(저온저장고, 정제기 등 13개소)          : 366백만원

◦ 특용수·유휴토지 조림사업(호두, 대추 등 44농가, 22ha)    : 127백만원

◦ 산림소득작물 재배지원(두릅, 산마늘, 곤달비 등 28농가, 13ha) : 165백만원

□ 백두대간 생태교육장 운영

◦시설별 이용내역                                                   (단위:명/천원)

시설명	2019년	2020년	2021년 11월말	전년대비 증감율
계	88,097 / 259,054	32,949 / 140,273	51,976 / 256,253	157% / 183%
전시관	61,399 / 32,592	18,541 / 9,530	23,466 / 11,378	127% / 119%
전시관 체험프로그램	12,318 / 17,022	5,020 / 6,943	10,214 / 7,955	203% / 115%
트리하우스(숙박)	2,476 / 53,460	1,432 / 23,640	2,760 / 60,400	193% / 255%
힐링캠핑장	92 / 460	128 / 640	1,276 / 6,380	996% / 996%
에코롯지(숙박)	2,508 / 78,240	1,820 / 54,460	3,052 / 86,080	167% / 158%
국민여가 캠핑장	10,304 / 77,280	6,008 / 45,060	11,208 / 84,060	186% / 186%

※ 숙박․캠핑장 보유현황 : 트리하우스(8동), 힐링캠핑장(6면), 에코롯지(6동), 국민여가캠핑장(31면)

⇒ 코로나 19 상황에서도 가족단위 관광패턴의 변화로 숙박 및 캠핑장

이용객 증가하였음

	아쉬운 점
◦ 코로나19 확산으로 인한 백두대간 생태교육장 전시관 이용객 감소 □ 체험휴양시설·에코롯지·캠핑장 이용객은 증가하였음 ◦ 소득사업 추진 시 중도 포기자 발생으로 사업지연 발생 □ 포기자에 대해 사업신청 제한하고, 적극적인 홍보로 대상자 발굴

2022년 중점 추진방향

탄소절감을 위한 녹색도시 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ 도시경관 녹화 및 건강한 산림자원 육성으로 탄소 중립 노력 - 도시민을 위한 생활권 주변 도시숲·가로수·미세먼지차단숲 조성 및 관리 - 조림, 숲가꾸기, 임도, 등산로 정비 등 내실있는 산림사업 추진 ◦ 명품 산림의 가치를 지키는 산림보호활동 추진 - 산불·산사태 등 재해예방 및 대응체계 확립 - 예찰·적기방제를 통한 산림병해충 확산 방지 ◦ 소득창출을 위한 산림소득 증대 지원 - 목재 생산․가공․유통․미이용자원에 대하여 현대화 및 규모화 추진 - 다양한 소득사업을 통한 임업농가 소득 증대 ◦ 백두대간생태교육장 활성화 - 차별화된 체험프로그램 운영⇔재방문 유도 - 고객 맞춤형 관광서비스 제공⇔만족도 증대

2022년 주요업무 계획

임 도 사 업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 산동면 대상리, 산내면 중황리 등

◦ 사 업 량 : 23.5km

◦ 사 업 비 : 1,027백만원(국비312, 도비407, 시비308)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 간선2km, 작업1.5km, 구조개량 4km, 보수16km, 임도관리원2명

□ 추진실적

◦‘22년 균특예산요구                           : ‘21. 8. 20.

◦‘22년 임도사업 실시설계용역                  : ‘21. 12. ~ ‘22. 2월

◦토지사용 승낙동의서 요청                      : ‘21. 12. 6. ~

◦ 21년 추진실적

- 간선임도(산동대상, 대강사석) 신설사업(3.7km, 591백만원) : ‘21. 7. ~

- 작업임도(대강 월탄) 신설사업(1.5km, 191백만원)         : ‘21. 7. ~

- 임도 지장목 정비 및 풀베기 사업(2회, 102.8km, 39백만원)   :‘21. 7. ~ 9.

- 임도구조개량 및 보수(13.9km, 3개소, 371백만원)        :‘21. 11. ~ 12.

□ 금후계획

◦‘22년 임도 사업 시행                          : ’22. 1. ~ 6월

(산동대상2km, 산내중황 1.5km, 구조개량 및 보수 20km)

◦ 임도관리원(2명) 사역 추진                      : ‘22. 2. ~ 10월

◦ 임도변 잡관목 및 풀베기 시행                  : ‘22. 5. ~ 10월

◦ 임도 점검 및 유지보수 시행                    : 연중

등산로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위     치 : 생활권 등산로(덕음산, 교룡산, 광암산, 복음산), 주요 등산로   (고리봉, 만행산), 주민참여예산(풍악산)

◦ 사 업 비 : 금380백만원 (도비100, 시비280)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 11월

◦ 사업내용 : 방향표지판, 종합안내판, 로프난간, 노면정비, 데크설치 등

□ 추진실적

◦ ‘22년 균특예산요구                             : ’21. 8. 20.

◦ 관내 등산로 일제 조사                          : ‘21. 9. ~ 10월

- 방향표지판28개소, 종합안내판 12개, 안전로프 90m, 노면정비, 잡관목제거 등

◦ 2021년 추진실적

- 문덕봉~그럭재 위험구간 정비공사(L=9.9km, 447백만원, 데크계단 4개소, 로프난간 등)

- 황산 외 6지구(황산, 승련사~귀정사, 교룡산, 덕음산, 애기봉, 서림공원)

(L=10km, 74백만원, 방향 및 종합안내판 4개소, 평의자 교체, 잡목제거, 로프난간)

- 등산로변 풀베기 사업추진(2회, 116.5km, 58백만원)

□ 금후계획

◦ 현지조사 및 실시설계용역 시행                  :‘22. 1. ~ 2월

◦ 사업시행                                       :‘22. 3. ~ 6월

◦ 등산로변 풀베기 시행(2회)                       :‘22. 5. ~ 10월

산불방지 대책

(계속사업)

□ 개    요

◦ 임야면적 : 46,604ha(시 면적의 61.9%)

◦ 사 업 비 : 2,166백만원(국비 399, 도비 298, 시비 1,469)

◦ 기    간 : 봄철(2. 1. ~ 5. 15.) / 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 사업내용 : 산불전문예방진화대 및 감시원 인부사역, 임차 헬기 배치, 차량 구입(교체), 산불감시카메라 교체 등

□ 추진실적

◦ 산불방지 대책본부 운영(21개소) :‘21. 2. 1. ~ 5. 15. / 11. 1. ~ 12. 15.

- 산불전문진화대 및 감시원 운영 : 120명(진화대 27명, 감시원 93명)

- 전라북도 임차헬기 배치(시부담금 105백만원) : 1,500ℓ/대산군비행장

- 산불방지 특별대책 수립·운영 : 정월대보름, 청명·한식, 가정의달 등

◦ 산불예방 및 홍보 활동 실시                     : 연중

- 명예 산불감시원 산불 예방 및 홍보활동 실시(776명)

- 산불위험물질 사전제거(파쇄기, 예초), 팸플릿 배포, 차량방송 등

◦ 산불대응센터 시설보완사업 시행                 :‘21. 5. ~ 10월

- 사 업 비 : 362백만원(실시설계용역 19, 공사비 343)

- 사업내용 : 대형관정 설치, 산불관제시스템 구축, 차고지 전동화 시설, 산불방비 보관창고 설치 등

◦ 산불대응센터 일원 경관조성 사업(30백만원)       :‘21. 12. 27 ~‘22. 1. 25

□ 추진계획

◦ 산불방지 대책본부 운영(21개소)  :‘22. 2. 1. ~ 5. 15. / 11. 1. ~ 12. 15.

- 산불전문진화대 및 감시원 운영 : 121명(진화대 28명, 감시원 93명)

※ 명예 산불감시원 산불예방 활동 실시(776명)

- 전라북도 임차헬기 배치(3,400ℓ/대산군비행장)

- 산불방지 특별대책 수립·운영  : 설명절, 정월대보름, 청명·한식 등

◦ 산불 진화 및 수송차량 교체 구입(2대/88백만원) :‘22. 2. ~ 3월

◦ 산불무인감시카메라 교체(3개소/60백만원)       :‘22. 2. ~ 3월

◦ 산불예방·홍보 활동(산불위험물질 사전제거, 팸플릿, 차량방송) : 연중

산림병해충 방제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 175ha(일반병해충 105ha, 소나무재선충 70ha)

◦ 사 업 비 : 344백만원(국비 223, 도비 36, 시비 85)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 소나무 재선충병 및 농림지 동시발생 병해충 예찰 방제 등

□ 추진실적

◦‘22년 소나무재선충병 방제 실시설계용역(35ha/7백만원)	:‘21. 12. ~‘22. 1월

- 위    치 : 산곡동, 왕정동, 대산면 일원

- 주요내용 : 고사목 벌채 및 파쇄, 예방나무주사

◦ 소나무류 반출금지구역 지정(‘21.4월 기준)      : 22개 동·리 / 5,691ha

※ 현재까지 재선충병 발생 누계 : 11본(용정동 6, 산곡동 2, 향교동 2, 대산 1)

◦‘21년 소나무재선충병 방제사업 (100.1ha / 195백만원)   : 1 ~ 3월 / 11 ~ 12월

- 위    치 : 용정동, 향교동, 대산면 수덕리 일원

- 주요내용 : 벌채 및 파쇄 416본, 예방나무주사 58,950본

□ 추진계획

◦ 소나무 재선충병 방제사업 추진(70ha, 120백만원)	:‘22.1.~3월 /10.~12월

- 위    치 : 남원시 용정동, 대산면, 주생면 일원

◦ 이동식 파쇄기 구입(1대, 110백만원)              :‘22. 2. ~ 3월

◦ 산림병해충 예찰·방제단 운영(4명)	:‘22. 2. ~ 12월

※ 소나무 재선충병 예찰활동 및 시료검경 의뢰 병행 실시

◦ 농림지 및 산림병해충 지상방제	(4회)	:‘22. 2. ~ 10월

- 위    치 :  교룡산 및 주요 임도, 지리산둘레길 휴양림, 요천강 100리길, 주요 도로변 등

보호수 및 노거수 등 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 보호수 및 노거수 정비 15본, 보호수 안전진단(진료) 16본, 재해우려목 제거 700여본 등

※ 관리현황 : 보호수 84본, 노거수 524본

◦ 사 업 비 : 382백만원(국비 82, 도비 30, 시비 270)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 보호수 및 노거수 생육개선 등 정비사업, 보호수(노거수) 안전진단(진료), 생활권 재해우려목 제거, 숲가꾸기 패트롤 운영(5명)

□ 추진실적

◦‘22년 보호수 및 노거수 정비 대상지 현지조사       :‘21. 11. ~ 12월

- 대    상 : 보호수 84본, 노거수 524본

- 조사내용 : 보호수 생육상태 점검 및 정비 필요 확인, 보호수 주변 시설물 점검 및 추가 설치 필요 여부 확인

◦보호수 및 노거수 정비 대상지 선정                  :‘21. 12월

- 대    상 : 보호수 11본, 노거수 4본

◦ 21년도 보호수 및 노거수 정비사업                 :‘21. 3. ~ 10월

- 위    치 : 금지 입압마을 등 12개소

- 사 업 비 : 124백만원(실시설계 8, 공사비 116)

◦ 생활권 재해우려목 제거사업 시행(177주/97백만원)   : 연중

※ 소경목, 긴급 민원처리⌜숲가꾸기 패트롤 작업단⌟ 활용 : 500여주

◦ 생활권 수목 진단 및 처방(25주 / 6백만원)           :‘21. 2. ~ 11월

□ 추진계획

◦ 보호수 및 노거수 생육환경개선 사업 실시설계      :‘22. 1. ~ 2월

◦ 22년 보호수 및 노거수 정비사업 시행              :‘22. 2. ~ 4월

◦ 생활권 재해우려목 제거 사업 시행                 : 연중

◦ 보호수 안전진단 및 생활권 수목 진료 컨설팅(25건)  :‘22. 2. ~ 11월

◦ 숲가꾸기 패트롤 선발 및 운영(5명)                 :‘22. 2. ~ 11월

미세먼지 차단숲 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 광치천변(용정동 산101-4번지 일원)

◦ 사업규모 : 2.0ha

◦ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000 시비 1,000)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12월

◦ 사업내용 : 완충녹지 및 쉼터조성

- 미세먼지 저감 권장 수종(소나무, 느티나무, 주목 등) 식재

□ 추진실적

◦ 공모 신청                                      :‘̍21.  4. 20.

◦ 대상지 선정(공모 확정)                          :‘21. 12.  9.

◦ 21년 추진실적

- 사업 착공(남원IC고속도로변/ 2.0ha, 1,566백만원):  ̍21. 9. 28. ~ ̍22. 1. 25.

□ 금후계획

◦ 사업계획 수립(실시설계 및 도시숲위원회 심의 등)  :‘22. 1. ~ 2월

◦ 사업시행                                         :‘22. 3. ~ 12월

함파우 지방정원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 산13번지 일원

◦ 조성면적 : 11.3ha

◦ 사 업 비 : 6,533백만원(도비 3,000 시비 3,533)  ※ 토지매입비 533백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년

◦ 사업내용 : 주제정원(백일원, 숲 향유원, 그라스원, 미세먼지 프리웨이, 다랭이 치유원) 및 산책로, 전망대, 편의시설 등 조성

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	6,533		6,533		500	2,533	2,000	1,500
국비
도비	3,000		3,000		250	1,000	1,000	750
시비	3,533		3,533		250	1,533	1,000	750
기타

□ 추진실적

◦ 용역추진상황

용 역 명	사업기간	사업비(천원)	비 고
계		651,777
기본 및 실시설계	̍20. 9. 3. ~ ̍21.12.15.	474,930	완료
문화재 지표조사	̍20.12.22. ~ ̍21. 5.14.	6,050	완료
문화재 표본조사	̍21. 6. 7. ~ ̍21.11. 5.	17,193	완료
산림조사	̍21. 8.30. ~ ̍21. 9.16.	6,580	완료
재해영향평가	̍21. 3.23. ~ ̍21.12.18.	83,454	사고이월
소규모환경영향평가	̍21. 3.23. ~ ̍21.12.18.	63,570	사고이월

◦ 함파우지방정원 경관심의                              :‘21. 9. 14.

◦ 도시관리계획결정(변경)신청-유원지 조성계획           :‘21. 9. 23.

◦ 유원지 조성계획 변경(남원시 고시 제2021-150호)       :‘21. 10. 1.

◦ 실시계획인가신청(도시과)                            :‘21. 12. 20.

- 인가신청면적 : 41,896㎡(원형보전구간 제외)

□ 금후계획

◦ 인⋅허가 등 사전행정절차 이행               :‘21. 12. ~‘22. 3월

- 실시계획인가, 소규모환경영향평가, 재해영향평가 협의 등

◦ 함파우 지방정원 조성사업 추진               :‘22년 ~‘23년

복지시설 나눔숲 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 대산면 대곡신계길 371 (효성의 집)

◦ 사업규모 : 1,148㎡

◦ 사 업 비 : 163백만원(녹색자금 163)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10월

◦ 사업내용 : 기반조성, 수목(교목‧관목) 식재, 퍼걸러, 벤치 설치 등

□ 추진실적

◦ 녹색자금지원사업 신청서 제출                     :‘21.  7. 19.

◦ 현장 심사(한국산림복지진흥원)                     :‘21.  8. 18.

◦ 2022년 사업대상지 선정                           :‘21. 10. 12.

◦ 21년 추진실적

- 포도원 : 1,840㎡/179백만원

□ 금후계획

◦ 실시설계 용역 시행                               :‘22. 1. ~ 2월

- 시설 관계자 및 자문단 의견 수렴

◦ 사업 시행                                        :‘22. 3. ~ 10월

무궁화동산 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 교룡산 국민관광단지 내(산곡동 251번지 일원)

◦ 사업규모 : 5,300㎡

◦ 사 업 비 : 100백만원(국비 50, 도비 15, 시비 35)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 10월

◦ 사업내용 : 기반조성, 무궁화 식재, 수목표찰·안내판 설치 등

□ 추진실적

◦ 공모신청                                       :‘21.  9. 1.

◦ 대상지 선정(국가예산 확보)                      :‘21. 10. 5.

◦ 그간 추진실적

- 덕과면 3‧1운동 발상지 기념탑 주변(2019년) : 8,467㎡/ 99백만원

□ 금후계획

◦ 사업계획 수립                                  :‘22. 1월

◦ 사업 시행(실시설계 등)                          :‘22. 1. ~ 10월

도시숲 및 가로수 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시숲 1.1ha, 가로수 조성 6.7㎞

◦ 사 업 비 : 1,490백만원(도비 745, 시비 745)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 경관개선, 공간활용성을 고려한 도시숲 및 가로수 조성

위 치		사업량	예산액	비고
합 계			1,490백만원
도시숲	소 계	1.1ha	590
	신정로타리(신정동 124-7)	0.3	140	동네한바퀴 건의사항
	딩동댕어린이집 앞(신정동 162-2)	0.3	150	도로변 유휴지
	도통동 628(호반아파트 앞)	0.5	300	호반아파트 강변로 인도
가로수	소 계	6.7㎞	900
	요천로(금지~주생)	1.5	175	20년 동해로 고사
	덕과로(소재지~용산마을)	2.2	257
	노송로(한국가스공사~송동 세전리)	1.5	168
	배촌길(주천리~배덕리)	1.5	300	연계 식재

□ 추진실적

◦ 22년 도시숲 조성사업 예정지 제출(도)          :‘21. 8. 9.

◦ 22년 도시숲 조성사업 예산 내시              :‘21. 11. 11.

◦ 22년 도시숲(도통동 628) 실시설계용역(구조검토 등) :‘21. 12. 1. ~ 12. 30.

◦ 21년 추진실적

- 도시숲 조성(인재개발원 외 4개소/ 1.35ha) : 배롱나무 외 30종 32,806주

- 가로수 조성(남원IC진입로 외 4개소/ 9.4㎞) : 가시나무 외 11종 19,601주

- 명상숲 조성(남원 교룡초등학교/ 0.2ha)     : 소나무 외 2종 1,061주

□ 금후계획

◦ 사업계획 수립                               :‘22. 1월

◦ 사업시행(실시설계 등)                        :‘22. 1. ~ 12월

스마트 가든볼 설치

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암농공단지, 광치농공단지

◦ 사업규모 : 3개소

◦ 사 업 비 : 90백만원(국비 45, 시비 45)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 노후 산업단지, 공공시설에 실내 휴식공간 제공으로 근로자 및 이용객의 만족도 제고

□ 추진실적

◦ 2022년 스마트가든 조성사업 수요조사(5개소)      :‘21. 7. 2.

◦ 2022년 사업비 배정(3개소)                       :‘21. 11. 11.

◦ 21년 추진실적

- 총 8개소 : 산업단지 5개소, 공공기관 3개소/ 213백만원

□ 금후계획

◦ 사업대상지 선정                                :‘22. 1월

- 면적, 수도․전기시설 여부, 향후 이용자를 위한 휴게공간 활용도 등

◦ 사업시행(실시설계 등)                           :‘22. 1. ~ 12월

산림소득증대사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업대상 : 임업인 또는 생산자단체

◦ 사 업 량 : 임산물 상품화 지원사업 등 11개 사업

◦ 사 업 비 : 3,374백만원(보조 2,203 자부담 1,171)

◦ 사업내용

사 업 명	규 모 (사업량)	사 업 비 (천원)		사 업 내 용
임산물 상품화지원	35개소	계	205,913	- 포장디자인개선, 포장박스 지원 - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50% - 작 물 : 고로쇠, 고사리, 표고, 산나물, 두릅, 곶감 등
		국비	82,365
		도비	37,064
		시비	86,484
임산물 생산기반조성	44개소	계	102,647	- 생산장비(예취기, 선별기, 전지기 등) 지원 - 생산시설 냉난방기 지원 - 병해충 방제용 장비 및 시설비 지원 - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		국비	41,059
		도비	18,476
		시비	43,112
임산물 유통기반조성	21개소	계	112,275	- 운반차량(냉동탑차, 화물차량) 지원 - 유통기자재(파렛트, 운반용 상자) 지원 - 저장‧건조시설(저온저장고, 건조기 등) 지원 - 가공장비(박피기, 절단기 등) 지원 - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		국비	44,910
		도비	20,209
		시비	47,156
친환경임산물 재배관리	150개소	계	496,727	- 토양개량제(입상소석회, 목탄 등) 지원 - 유기질비료(퇴비, 혼합유박 등) 지원 - 재원비율 : 토양개량 - 보조 100% 혼합유박 –2천원/20kg, 퇴비-1.4 ~ 1.7천원/20kg 지원
		국비	346,327
		도비	45,120
		시비	105,280
산림작물생산 단지조성(소액)	46개소	계	673,001	- 공모 : 2농가<조경수 컨테이너 재배시설(권태환), 버섯재배사(유일환)> · 재원비율 : 보조 60% 자부담 40% - 일반 : 44농가(생산단지 규모화를 위한 생산시설‧장비 지원) · 관수·관정, 자동화시설, 하우스, 관리사, 감시시설 등) · 원목 표고버섯 재배를 위한 표고자목 지원 · 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		국비	395,334
		도비	83,300
		시비	194,367
목재펠릿보일러 지원사업	2개소	계	6,800	- 목재펠릿보일러 지원 (주택용 1대·주민편의사회복지용 1대) - 재원비율 : 주택용(보조 70% 자부담 30%), 주민편의 사회복지용(보조 100%)
		국비	3,200
		도비	1,080
		시비	2,520
백두대간 주민소득지원	63개소	계	417,740	- 공모 : 1농가<다온영농조합법인(보조270, 자담30)> · 고사리 저장 및 가공시설 - 일반 : 62농가<백두대간 보호지역 토지소유자 및 거주 주민> · 생산기반 조성(하우스, 관정 등) 지원 · 저장·건조·가공시설(저온저장고, 건조기 등) 지원 · 재원비율 : 보조 90% 자부담 10%
		국비	324,909
		도비	27,850
		시비	64,981
산림소득작물 재배지원사업	22개소	계	83,000	- 두릅 묘목비 지원(33백만원) - 산채나물(곤달비,산마늘) 묘목비 지원(50백만원) - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		시비	83,000
산림소득작물 표고배지/자목 지원사업	20개소	계	50,000	- 신규사업 - 표고재배농가대상 배지/자목구입비용 지원(50백만원) - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		시비	50,000
귀산촌인 산림소득작물 재배지원사업	5개소	계	25,000	- 신규사업 - 귀산촌인 두릅 묘목비 지원(10백만원) - 귀산촌인 산채나물(곤달비,산마늘) 묘목비 지원(15백만원) - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		시비	25,000
명품왕대추 낙과방지지원사업	60개소	계	30,000	- 신규사업 - 왕대추 생산농가 비료 구입비용 지원 - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		시비	30,000

□ 추진실적

◦ 농림축산식품사업 수요조사 및 심의회 추진	:‘21. 1. ~ 3월

- 임산물 상품화 지원사업 등 11사업 357농가

◦ 산림소득분야 및 백두대간 주민소득 지원사업 공모 선정  :‘21. 12월

- 산림작물 생산단지 조성(공모) 2농가, 백두대간 주민소득 지원사업(공모) 1농가

◦‘21년 사업 추진

- 임산물 상품화지원 등 8개 사업 추진 : 327농가 1,961백만원

□ 금후계획

◦ 2022년 산림소득분야 보조사업 사업 신청서 접수 : ‘21. 12. 27. ~‘22. 1. 31.

◦ 2022년 산림소득분야 보조사업 사업대상자 확정 : ‘22. 2월

◦ 2022년 산림소득분야 보조사업 교부결정 및 사업시행 : ‘22. 2. ~ 10월

◦ 2022년 산림소득분야 보조사업 준공 및 사업비 정산 : ‘22. 4. ~ 12월

조 림 사 업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산동면 대상리 산20번지 등 255필지

◦ 사 업 량 : 207ha (백합, 소나무, 상수리, 편백 등 식재)

◦ 사 업 비 : 1,603백만원 (국비 698 도비 242 시비 663)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

구 분	사업량	사업예정지	비 고
계	207ha
경제림조성	135ha	벌기령 벌채지, 수종갱신지, 미립목지
큰나무공익조림	5ha	도로변, 관광지 등 경관보전이 필요한 산림
산림재해방지조림	10ha	산림재해지 및 재해우려지
지역특화조림	10ha	남원목기산업 특화 조림
내화수림대조림	5ha	대형산불피해지 및 산불피해우려지
미세먼지저감조림	14ha	도시외곽, 산업단지 인근산림
풍경있는 농산촌가꾸기	8ha	금지 방촌마을 내
특용자원·유휴토지	20ha	임야, 한계농지, 마을 공한지

□ 추진실적

◦‘22년 조림사업 추진계획 수립	:‘21. 12월

-‘22년 조립사업(경제림조성 등 6종) 예정지 조사

- 지역특화조림(남원목기산업) 예산 확보(옻, 물푸레)	:‘21. 5월

- 풍경있는 농산촌가꾸기 사업 (금지 방촌마을) 공모 선정 :‘21. 9. 14.

◦ 풍경있는 농산촌가꾸기 사업 실시설계용역	:‘21. 11. ~ 12.

◦‘21년 사업 추진

- 경제림 조성 : 228ha/966백만원 - 내화수림대 조림  : 10ha/52백만원

- 큰나무·미세먼지조림 : 18ha/162백만원 - 유휴토지 조성 : 20ha/106백만원

□ 금후계획

◦‘22년도 봄철 조림사업 실시설계용역 시행           :‘22. 1. ~ 2월

◦ 봄철 나무심기 시행 (경제림 외 6종 172ha)              :‘22. 3. ~ 4월

◦ 특용자원·유휴토지 사업 대상지 확정 및 시행(두릅, 호두 등) :‘22. 2. ~ 11월

◦ 가을철 나무심기 시행 (경제림 35ha)             :‘22. 9. ~ 11월

정책숲가꾸기사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 1,310ha

◦ 사 업 비 : 2,364백만원(국비 1,182, 도비 355, 시비 827)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용

- 조림지풀베기   : 960ha / 1,666백만원(조림 당해연도 ~ 5년)

- 어린나무가꾸기 : 250ha / 434백만원(조림 후 5년 ~ 10년)

- 큰나무가꾸기   : 40ha / 69백만원(조림 후 15년부터, 인공림 등)

- 산불예방숲가꾸기 : 30ha / 114백만원

- 공익숲가꾸기 : 30ha / 81백만원

□ 추진실적

◦‘22년 숲가꾸기 추진계획 수립	:‘21. 12월

- 2022년 숲가꾸기 사업 대상지 산주 동의서 징취

- 2022년 풀베기 및 어린나무가꾸기 사업 예정지 조사

◦ 2021년 사업 추진

- 조림지 풀베기사업 : 964ha / 1,480백만원

- 어린나무가꾸기사업 : 150ha / 204백만원

- 큰나무가꾸기(공익림가꾸기포함) : 60ha / 167백만원

□ 금후계획

◦ 숲가꾸기(큰나무가꾸기 등 5종) 실시설계 용역        :‘22. 1. ~ 3월

◦ 큰나무가꾸기, 산불예방숲가꾸기, 공익림가꾸기       :‘22. 2. ~ 10월

◦ 조림지 풀베기                                     :‘22. 5. ~ 8월

◦ 어린나무가꾸기                                    :‘22. 6. ~ 9월

목재산업시설 지원사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업대상자 : 2개소(남원산림조합, 관내 제재업 등록업체 1개소)

◦ 사  업  량 : 미이용자원화센터, 목재산업시설 현대화 지원

◦ 사  업  비 : 3,200백만원 (보조 2,220 자부담 980)

◦ 사업 기간 : 2022. 1. ~ 12월

구 분	대상자	사업비(백만원)			사업내용	비 고
		계	보조	자부담
계	2개소	3,200	2,220	980		재원비율
미이용 자원화센터	남원 산림조합	3,000	2,100	900	공장(우드칩,톱밥시설)	50:6:14:30
목재산업시설 현대화지원	관내 제재업소	200	120	80	노후된 제재소 시설교체	40:6:14:40

□ 추진계획

◦ 목재산업시설 현대화지원사업 공모 접수          :‘21. 12. 29.

◦ 목재산업시설 현대화지원사업 공모심사 및 선정	:‘22. 1월

◦ 목재산업시설 현대화지원사업 교부결정 및 사업시행, 준공	:‘22. 3. ~ 11월

◦ 미이용자원화센터 추진계획 및 대상자 사업계획 확정  :‘22. 1. ~ ‘22. 2.

◦ 미이용자원화센터 교부결정 및 사업시행, 준공	:‘22. 3. ~ 11월

□ 기대효과

◦ 노후된 목재 생산시설 현대화로 관내 제재업소 산업경쟁력 강화

◦ 미이용 산림부산물 활용 신재생 에너지원료, 축사깔개, 표고톱밥배지 등 생산으로 지역경제 활성화 기여

백두대간생태교육장 운영 활성화 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설현황 : 8개시설                                      (단위:억원)

시설명	조성연도	규모	시설내용	투자사업비	비고
계	8개시설			382
전시관	2016	23,826㎡	백두대간 테마 전시	257	건축 5,160㎡
체험·휴양시설	2014	210,545㎡	트리하우스 8동	67	건축 897㎡
힐링 캠핑장	2018	5,000㎡	캠핑장 6면	0.5
에코롯지	2017	8,389㎡	숙박 6동	8	건축 253㎡
국민여가 캠핑장	2017	8,063㎡	오토캠핑장 31면	20	건축 200㎡
워터파크	2018	769㎡	물놀이시설	5
유아숲체험원	2018	6,500㎡	야외체험 학습장	1.5
생물테마전시관	2021	482㎡	4개실(물고기,올빼미, 곤충,특수동물)	23	2022년 개관예정

◦ 인력현황 : 27명 (전시관 6, 체험휴양 8, 에코롯지 8, 생물테마 2)

◦ 입장객및수입액 : 51,976명/256,253천원   ※ 20년 32,949명/140,273천원

□ 추진실적

◦ 시설별 방문객 및 수입현황                          (기준 2021. 11.30)

구분	계	전시관	체험·휴양시설		에코롯지	국민여가 캠핑장
			트리하우스	힐링캠핑장
방 문 객(명)	51,976	33,680	2,760	1,276	3,052	11,208
수입액(천원)	256,253	19,333	60,400	6,380	86,080	84,060

※ 숙박․캠핑장 보유현황 : 트리하우스(8동), 힐링캠핑장(6면), 에코롯지(6동), 국민여가캠핑장(31면)

⇒ 코로나 19 상황에서도 가족단위 관광패턴의 변화로 숙박 및 캠핑장 이용객

전년대비 180% 정도 증가 되었음.

◦ 물놀이장 개장 운영 : 5,778명 (2021. 7.9.~8.31.) / 1일 5회 운영

◦ 여름방학 소규모 특별전 운영 : 6,454명 (2021.7.24.~8.22.)

◦ 백두대간 운영관리방안 용역 실시 : 지방정책연구원 / 20백만원

◦ 산림치유프로그램 운영 : 몸그린 맘크린 외 9개 프로그램 / 108회 / 1,211명

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 코로나19 상황에도 숙박시설 이용객은 증가 하였으나, 이용률 분석결과

〈2018~2021년 숙박시설 주중․주말 이용률 분석결과〉

주중 이용률 (21년기준 : 트리하우스 16.3%, 에코롯지 26.2%) 다소 저조한 실정임

□ 숙박 이용객(7~8월제외) 예약 증가를 위해 주중 숙박, 당일 미예약 객실        할인(50%) 및 산림치유 체험, 생태관광 연계 숙박(1박2일)이용 활성화 추진

□ 활성화 방안 로드맵

〈2022년도〉--------- 백두대간생태교육장 홍보의 해

◦전시관 : 휴식공간 마련 및 체험(이벤트) 확대 추진

- 휴식공간 : 카페테리아 조성(남원자활센터 운영 협의- 위탁 또는 무인카페․편의점 조성-직영)

- 체험확대 : 기획특별전, 이벤트(저그볼)추진, 찾아가는 곤충표본 만들기 체험

◦에코큐브 : 생물체험(곤충,물고기,특수동물,올빼미) 및 다양한 홍보채널 구축

- 생물체험 : 거북 등 32종 831마리 체험, 유튜브, SNS, 인스타그램 홍보

※ 주 생물 입식 지연(2022.6.30.까지) : 올빼미(12마리), 원숭이(2마리)

◦숙박․캠핑장 : 주중 숙박 예약률(20%→50%) 향상 및 이벤트 추진

- 숙박시설 : 주중 숙박 50% 할인(남원시민 이용기대), 산림치유프로그램(1박2일) 연계

- 캠 핑 장 : 이벤트(별빛축제, 작은음악회)개최, 유아숲 프로그램 연계

◦고객의 소리 : 시설별(전시관,에코롯지,트리하우스) 만족도 및 설문조사(2022. 1~6월)

〈2023년도〉----------- 백두대간생태교육장 재방문의 해

◦ 전시관 : 디지털 전시관 및 해설 서비스 확대

- 디지털 전시관 구축 : 기획전시실 디지털 전시관으로 전환, 무인매표시스템 도입

․전시관 내 기존 조형물 교체 및 디지털 전시관 구축, 무인매표시스템 설치

․백두대간 관련 디지털 영상물 제작 및 VR체험시설 설치 ※써클영상관 영상물 제작

◦ 에코정원 조성 : 생태체험 인프라 구축 및 커뮤니티 활성화 추진

- 체험공간 구성 : 생태관찰, 습지체험, 경관테마, 놀이및휴게공간, 에코매니저 운영

〈기반시설 구축 후 2024년 이후 백두대간생태교육장  10만명 → 30만명 방문 예상〉

□ 금후계획

【전 시 관】

◦ 유아숲 체험원 운영	:‘22. 3. ~ 12월

- 유아숲 체험원 민간위탁 실시 : 150회 정도 교육실시

◦ 전시관 무료입장 시행(조례개정, 무인발매시스템 구축) :‘22. 6월 중

◦ 여름방학 / 겨울방학 특별전 개최	:‘22. 7. ~ 8월 / ‘22. 12 ~‘23. 1.

- 특별전 주제 발굴 및 추진계획 수립 : 5월, 11월 / 사전준비 : 6월, 12월

- 특별전 해설인력 6명(여름방학 3명, 겨울방학 3명) 채용 운영

- 수시인력(대학생 일자리) 20여명 활용

【체험휴양시설】

◦ 트리하우스 비수기(1월~6월/9월~12월) 주중 50% 할인(조례개정) 추진   :‘22. 6월 중

◦ 백두대간 트리하우스·힐링캠핑장 운영	: 연중 / 8동, 6면

◦ 산림치유 프로그램 운영	:‘22. 4. ~ 11월

- 산림치유지도사 1급 1명, 2급 1명 채용 운영

【에코롯지·캠핑장】

◦ 에코롯지 비수기(1월~6월/9월~12월) 주중 50% 할인(조례개정) 추진   :‘22. 6월 중

◦ 에코롯지 및 국민여가 캠핑장 운영               : 연중 / 6동, 31면

◦ 물놀이장 운영	:‘22. 7. ~ 8월

- 물놀이 안전관리자 2명 채용 운영

【생물테마전시설】

◦ 생물테마전시설(에코큐브) 개관 및 입장료 징수 조례 제정  :‘22. 6월 중

- 생물체험 : 올빼미, 원숭이, 거북이 등 32종 831마리 체험

◦ 생물테마전시설(에코큐브) 운영                      :‘22. 6. ~ 지속

- 청년일자리(에코-키퍼) 인력 3명 채용 운영

- 생물관리 및 시설물 관리 인력 1명 채용 운영

조경수 관리 전담팀 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 주요 도로변 및 화단, 요천100리 숲길 등

◦ 인    원 : 11명(전담인력 9, 보조인력 2)

◦ 사 업 비 : 394백만원(시비 394)

◦ 사업기간 : 2022. 2. ~ 11월

◦ 사업내용 : 조경수 및 관목류 전정, 가로수 가지치기 등 수목관리

□ 추진실적

◦ 2021년 추진실적

- 시가지 가로수·녹지대 수목 전정(요천로, 충정로 등 16노선 50.78km)

·배롱 등 교목 20종 33,131주, 철쭉 등 관목 11종 396,963주

- 마을숲, 읍면 화단 정비(사매 상신마을, 금지 입암마을 등 21개소)

·소나무 등 교목 10종 5,114주, 홍가시 등 관목 3종 15,711주

- 조경시설지 내 수목 관리(국악의 성지, 서도역 등 17개소)

·소나무 등 25종 4,081주, 조팝나무 등 관목 11종 253,830주

◦‘22년도 작업 대상지 현지조사                      : ’21. 12월

□ 금후계획

◦ 조경수 관리 종합계획 수립 및 전담인력 채용        :‘22. 1월

◦ 주요 도로변 및 관광지 주변 등 관리 작업 시행          :‘22. 2. ~ 11월

◦ 생활권 주변 가로수 민원 처리                      : 수시

요천변 등 꽃단지 조성 및 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 4개소(오감만족숲⋅요천변 ‧ 향기원 ‧ 핑크뮬리 꽃단지)

◦ 사업규모 : 114,221㎡

- 오감만족숲 30,000 향기원 17,373 요천변 13,475 핑크뮬리 단지 53,373

◦ 총사업비 : 120백만원(시비 120)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 사계절 꽃단지 조성, 포토존·편의시설 설치 등

□ 추진실적

◦ 2021년 추진실적

- 도심속 향기원 : 관목 보식(수국 2,100주), 노거수(버드나무) 지지대 설치

- 핑크뮬리 꽃단지 : 초화류 보식(핑크뮬리 26,400주) ※ 2021년 방문인원 16,566명

- 오감만족숲 : 수목 보식(꽃복숭아 등 3종 2,715주) 및 초화류 1,840본 식재

- 요천변 꽃단지 복구 : 식재 화단 조성(13,475㎡), 초화류 식재 62,103본 등

- 2021년 꽃묘 생산 : 팬지 등 10종 284,355본

·식재(228,520본) : 광한루 정문 등 18개소, 꽃박스 295개

·배부(55,835본) : 시설지(혼불문학관 등) 7개소, 읍면동 16개소

◦‘22년도 초봄 식재용 초화류 파종                : ’21. 9. ~ 10월

□ 금후계획

◦ 계절별 초화류 생산·식재                         : `22. 2. ~ 12월

◦ 핑크뮬리 꽃단지 초화류(백일홍 외 1종) 파종 및 보식  : `22. 3월 중

◦ 도심속 향기원 황토 산책길 조성                     : `22. 3. ~  6월