건 설 과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		40,099,114	6,659,140	33,434,194
명시	소 계	4,179,376	3,498,753	680,641
	시특법 교량 보수 보강공사(승사교)	119,136	13,304	105,832	- `22년 2월 사업 발주 완료 - `22년 5월한 사업 완료 예정
	평촌~강기 도로 확포장공사	3,685,240	3,485,431	199,809	- 용지보상 중(78%) - `22년 3월 발주 예정
	요천2교 보수 및 내진보강공사	350,000	-	350,000	- `22년 2월 사업 발주 완료 - `22년 8월한 사업 완료 예정
	수지면 남창·용강마을 도로변 (군도 5호선) 정비	25,000	-	25,000	- 실시설계용역 추진 중 3월 공사 발주 - `22년 6월한 사업 완료 예정
사고	소 계	35,919,738	3,160,405	32,753,553
	하천 유지관리	77,106	37,308	39,798	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 3월한 공사 완료 예정
	기성제유지관리	13,800	0	13,800	- ‵21년도 광치천 모니터링 용역 6월한 완료 예정
	국가하천 유지보수 사업(보조)	653,348	634,253	19,095	- `22년 3월한 관급자재 수불 및 자금집행
	기성제유지관리 (보조)	94,519	19,975	74,544	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 5월한 공사 완료 예정
	하천 유지관리(보조)	242,758	0	242,758	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 6월한 공사 완료 예정
	지방하천정비사업 (섬진강수계) 보조 (전환)(전환사업)	825,474	24,976	800,498	∘ 준공예정(원천천 폐기물 2차분) : 4월 ∘ 관급자재 납품예정 : 4월
	지방하천정비사업 (낙동강수계) 보조 (전환)(전환사업)	1,869,773	165,235	1,704,538	∘ 준공(풍천 3차분) : 1월 ∘ 관급자재 납품예정 : 4월
	소하천 정비 (전환사업)	3,180,421	140,123	3,040,298	∘ 납품완료(과립,산곡천) : 3월 ∘ 준공예정(산곡천 1차분) : 6월 ∘ 준공예정(과립천 1차분) : 8월 ∘ 준공예정(당동천 3차분) : 11월
	수해복구(자체)	459,492	70,497	388,995	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 6월한 공사 완료 예정
	재해복구사업 (국가하천)	13,458	0	13,458	- `22년 3월한 관급자재 수불 및 자금집행
	재해복구사업 (지방하천)	7,060,724	628,549	6,432,175	∘ 공사 기성금 지급 : 5월 ∘ 관급자재 검수 : 5월 ∘ 공사완료 : 10월 (효촌천, 주촌천)
	재해복구사업 (소하천)	8,427,539	267,970	8,159,569	∘ 공사 기성금 지급 : 5월 ∘ 관급자재 검수 : 5월 ∘ 공사완료 : 10월 (효촌천, 주촌천)
	재해복구사업 (지방하천 추가지원)	8,466,114	95,088	8,371,026	∘ 공사 기성금 지급 : 5월 ∘ 관급자재 검수 : 5월 ∘ 공사완료 : 10월 (효촌천, 주촌천)
	부석~오촌 도로 확포장공사	42,021	-	42,021	- `22.02.18.관급자재(아스콘) 집행 완료(100%)
	영촌선 농어촌도로 정비공사	9,990		9,990	-`22년 6월한 용역 완료 예정
	도용선 농어촌도로 확포장공사	502,680	198,393	304,287	- 토지수용 행정절차 이행중 - `22년 6월한 공사 완료 예정
	상황선 농어촌도로 확포장공사	59,208	-	59,208	- 편입토지보상금 미수령 - 토지보상협의 적극 추진
	배촌선 농어촌도로 개설공사	100,478	-	100,478	- 관급자재 납품시기 미도래
	인월 중군마을 진입로 정비공사	394,668	-	394,668	- 분할측량 및 감정평가 완료 - 용지보상 추진 및 공사 추진
	인월 장평마을 진입로 정비공사	11,351	-	11,351	- 편입토지보상금 미수령 - 토지보상협의 적극 추진
	이백 오산길 도로 정비공사	50,354	-	50,354	- `22년 5월한 공사 완료 예정
	수지 호곡 위험도로 구조개선사업	922,937	590,351	332,586	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 5월한 공사 완료 예정
	이백 초촌 위험도로 구조개선사업	125,419	3,670	121,749	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 6월한 공사 완료 예정
	운봉로 아스콘 재포장공사	43,667	-	43,667	- `22.02.04. 관급자재(도막형바닥재) 집행 완료(100%)
	남원중학교 앞 자전거도로 개선공사	98,637	-	98,637	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 4월한 공사 완료 예정
	군도3호선(주생면 상도길) 도로 구조개선공사	69,039	-	69,039	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 5월한 공사 완료 예정
	문오로 도로열선설치공사	414,873	-	414,873	- 동절기 공사 중지 3월중 해제 - `22년 4월한 공사 완료 예정
	군도 23호선(운봉읍 임리 가을농원 앞) 배수정비공사	25,691	-	25,691	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 6월한 공사 완료 예정
	농어촌도로 205호선 (주생면 정영선길) 배수시설공사	33,140	-	33,140	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 3월한 공사 완료 예정
	시도 28호선(용정동 춘향로) 외 2지구 배수정비공사	43,097	-	43,097	- 한전 지장주 이설 지연으로 `22년 9월한 공사 완료 예정
	읍면지역 시도 11호선 (대사로) 위험도로구간 안전시설물 제작 및 설치	9,990	-	9,990	- `22.02.23. 물품(쏠라 표지병) 집행 완료(100%)
	호은선 농어촌도로 확포장공사	17,275	-	17,275	- `22.02.25. 공사 착공 - `22년 3월한 관급자재 수불 및 자금집행
	축천교 외 1개소 보수 및 내진보강공사	391,103	-	391,103	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 5월한 공사 완료 예정
	시도 25호선 (고죽동 고산마을 앞) 진입로 확포장공사	61,980	-	61,980	- 동절기 공사중지 해제(22.03.02.) - `22년 4월한 공사 완료 예정
	2021년 법정도로 유지관리사업(긴급보수)	61,249	32,380	28,869	- `22년 4월한 공사 완료 예정
	2021년 상반기 도로시설물 유지보수공사 단가계약	57,303	30,000	27,303	- `22년 3월한 공사 완료 예정
	2021년 걷고싶은 거리조성공사 실시설계	18,865	-	18,865	- `22.02.25. 용역 준공금 집행 완료 (100%)
	시도 326호선 (도통동 녹주사우나 앞) 외 1지구 도로정비공사	30,373	-	30,373	- `22.02.04. 관급자재대 집행 완료 (100%)
	서남원IC 회전교차로 설치공사	502,180	40,000	462,180	- `22년 6월한 공사 완료 예정
	사매~덕과 도로구조개선사업	437,644	181,637	256,007	- `22년 3월한 공사 준공, 관급자재 검수 및 자금 집행 예정