교 통 과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		13,990,968	9,596,458	3,386,595
명시	소 계	2,464,979	1,383,124	559,000
	어린이보호구역 시인성 강화사업	63,200	4,200	59,000	◦실시설계용역 준공 (‘21. 12월) ◦사업발주 및 준공 (‘22. 3월~5월)
	공영주차장 정비사업	2,401,779	1,378,924	500,000	◦실시설계용역 완료예정 (‘22. 3월) ◦도유지 협의(‘22. 3월~4월) ◦주차장 조성사업 추진(‘22. 4월~6월) ※ 예산재배정액 : 26,883 - 송동 주차장조성 및 육모정 주차장 유지관리 ※ 사고이월 : 495,972 - 만복사지 공영주차장 토지매입비 등
사고	소 계	11,525,989	8,213,334	2,827,595
	교통 안전 시설물관리	1,941,849	1,705,239	236,610	◦표지판 정비 단가공사 준공 예정 (‘22. 3월)
	교통 안전 시설물관리(보조)	290,000	38,592	234,030	◦관급자재 납품 준공 예정(‘22. 6월) ※ 불용액 : 17,377 - 낙찰 차액 및 법정보험료 정산
	자전거시설 관리	220,000	34,128	185,695	◦자전거도로 정비사업 재착공(‘22. 3월) ◦자전거도로 정비사업 준공예정(‘22. 3월) ※ 불용액 : 177(법정보험료 정산)
	어린이보호구역 개선사업	450,000	427,223	13,510	◦관급자재 납품 지급완료(‘22. 1월) ※ 불용액 : 9,267(법정보험료 정산)
	공영주차장 정비사업	2,401,779	1,378,924	495,972	◦공영주차장 조성사업 재착공(‘22. 3월) ◦공영주차장 조성사업 준공예정(‘22. 5월) ※ 예산재배정액 : 26,883 - 송동 주차장조성 및 육모정 주차장 유지관리 ※ 명시이월 : 500,000 - 산내 반선지구 공영주차장 조성
	공영주차장 조성사업(보조)	4,100,000	3,152,056	947,942	◦공영주차장 조성사업 준공예정(‘22. 6월)
	마을주민 보호구역 정비사업	440,000	421,641	18,359	◦관급자재 납품 지급완료(‘22. 2월)
	어린이보호구역 단속카메라 등 설치사업	1,332,200	944,111	387,708	◦관급자재 납품 준공예정(‘22. 3월) ※ 불용액 : 381(법정보험료 정산)
	생활권 이면도로 시설개선사업	66,700	62,840	3,788	◦관급자재 납품 준공예정(‘22. 6월) ※ 불용액 : 72(법정보험료 정산)
	어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치사업	240,000	0	239,692	◦관급자재 납품 지급완료(‘22. 2월) ※ 불용액 : 308(법정보험료 정산)
	자전거이용 활성화 기본계획 재수립	43,461	0	43,461	◦기본계획 수립용역 준공예정(‘22. 5월)
	주차장 수급실태 조사 및 주차장환경 개선 기본계획 수립				◦기본계획 수립용역 준공예정(‘22. 5월)
		69,408	48,580	20,828