환경사업소

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		21,754,323	15,731,999	6,022,324
명시	소 계	16,707,633	12,640,518	4,067,115
	아영인풍지구 하수관로 정비사업	308,860	121,168	187,692	◦실시설계용역 : 2020.6. ~ 2022.4. ◦환경부 재원협의 : 2022.3. ~ 5. ◦공사시행 : 2022.6. ~ 2024.12.
	남원(3단계) 하수관로 정비사업	15,519,350	12,519,350	3,000,000	◦실시설계용역 : 2017.12. ~ 2019.12. ◦환경부 재원협의 : 2019.9. ~ 10. ◦공사시행 : 2020.2. ~ 2023.12.
	산내지구 하수관로 정비사업	165,423	0	165,423	◦실시설계용역 : 2020.6. ~ 2021.12. ◦환경부 재원협의 : 2021.11. ~ 12. ◦공사발주(조달청 의뢰) : 2022.1.24. ◦공사시행 : 2022.3. ~ 2023.12.
	남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업	714,000	0	714,000	◦실시설계용역 : 2020.6. ~ 2021.12. ◦환경부 재원협의 : 2021.11. ~ 12. ◦공사발주(조달청 의뢰) : 2022.1.24. ◦공사시행 : 2022.3. ~ 2023.12.
사고	합 계	5,046,690	3,091,481	1,955,209
	2021 회계연도 하수도공기업특별회계 결산 회계감사 용역	7,000	0	7,000	◦2021회계연도 하수도공기업특별회계 결산 완료 후 3월중 지급예정
	수지천수질모니터링 및공공공하수처리시설 방류수 관리방안 제시용역	26,307	0	26,307	◦용역발주 : ‘21.9월 ◦용역완료 : ‘22.9.20
	소규모마을하수처리구역 하수관거 기술진단	75,887	0	75,887	◦용역발주 : ‘21.10월 ◦용역완료 : ‘22.2.28
	소규모마을하수처리구역 하수관로 CCTV 조사용역	69,391	0	69,391	◦용역발주 : ‘21.11월 ◦용역완료 : ‘22.3.29
	소규모마을하수처리수역 하수관로 기술진단 용역	10,560	0	10,560	◦용역발주 : ‘21.9월 ◦용역완료 : ‘22.2.28
	스마트 남원하수처리장사업 실시설계 용역	126,115	0	126,115	◦용역발주 : ‘21.12월 ◦용역완료 : ‘22.5월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급자재(맨홀뚜껑)	193,319	135,323	57,996	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급자재(혼합골재)	55,561	38,893	16,668	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급자재 (조립식PC소형맨홀)	51,808	36,266	15,542	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급자재(경계석)	3,667	0	3,667	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘)	650,409	453,182	197,227	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원처리구역 외 5개지역 하수관로 정비사업 실시설계 용역	502,900	352,030	150,870	◦용역착공 : ‘21.3월 ◦용역완료 : ‘22.5월
	남원(3단계) 하수관로 정비사업 폐기물 처리용역(2차분)	1,393,000	975,100	417,900	◦용역착공 : ‘21.3월 ◦용역완료 : ‘22.6월
	남원(3단계) 하수관로 정비사업 CCTV 조사 및 수밀시험 용역(2차분)	666,000	460,000	206,000	◦용역착공 : ‘21.3월 ◦용역완료 : ‘22.6월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분-추가) 관급자재(조립식PC소형맨홀)	11,337	0	11,337	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원처리구역 외 5개지역 하수관로 정비사업 소규모 환경영향평가 용역	67,500	0	67,500	◦용역착공 : ‘21.5월 ◦용역완료 : ‘22.5월.
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분-추가) 관급자재(조립식PC맨홀)	72,405	50,449	21,956	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분-추가) 관급자재(레미콘)	84,361	58,780	25,581	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계) 하수관로 정비사업(2차분-추가) 관급자재(내충격하수관)	176,397	162,558	13,839	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	남원(3단계) 하수관로 정비사업 외 1건 통합 건설사업관리(감리)용역	565,650	368,900	196,750	◦용역착공 : ‘21.5월 ◦용역완료 : ‘22.3월
	남원처리구역 외 5개지역 하수관로 정비사업 설계안정성 검토 용역	19,000	0	19,000	◦용역착공 : ‘21.7월 ◦용역완료 : ‘22.5월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급자재(순환골재)	10,815	0	10,815	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	2021년 하반기 하수도 준설공사 준설토 폐기물 처리용역	7,400	0	7,400	◦용역착공 : ‘21.12월 ◦용역완료 : ‘22.1월
	효촌마을 하수관로 정비 사업 관급(아스콘) 추가	20,078	0	20,078	◦공사착공 : ‘20.11월 ◦공사완료 : ‘22.1월
	남원(3단계) 하수관로 정비사업(1차분) 관급자재(레미콘)	26,036	0	26,036	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월
	용전마을 노후 하수관로 정비공사 관급(아스콘) 추가	6,077	0	6,077	◦공사착공 : ‘20.12월 ◦공사완료 : ‘22.1월
	남원(3단계)하수관로 정비사업(2차분) 관급(아스콘)	147,710	0	147,710	◦공사착공 : ‘21.3월 ◦공사완료 : ‘22.6월

(단위 : 천원)