상수도사업소

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		15,574,901	6,939,384	8,521,593
명시	소 계	2,920,997		2,807,073
	스마트 관망관리 인프라 구축 사업	2,920,997		2,807,073	◦실시설계용역 추진(`21.3.~`22.5.) ◦공사 착공(`22.6.) ◦공사 완료(`22.12.)
사고	합계	12,653,904	6,939,384	5,714,520
	『인월 내건마을 마을상수도 배수관 이설공사』 시행	8,240	-	8,240	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『인월 내건마을 마을상수도 배수관 이설공사』관급 자재구입(내충격수도 관및이음관)	715	-	715	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『인월 내건마을 마을상수도 배수관 이설공사』관급 자재 구입(레미콘)	1,332	-	1,332	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『인월 내건마을 마을상수도 배수관 이설공사』관급 자재 구입(용접철망)	471	-	471	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『이백 문화마을 기능상실 마을상수도 철거공사』시행	23,118	-	23,118	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『산내 와운마을 마을상수도 관정 개발공사』시행	9,990	-	9,990	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 6. 30.)
	『산내 와운마을 마을상수도 관정개발 공사』관급자재 구입	7,450	-	7,450	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 6. 30.)
	『산내 달궁마을 마을상수도 이용 시설공사』시행	103,915	-	103,915	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『산내 달궁마을 마을상수도 이용 시설공사』관급 자재 구입(아스콘)	24,890	-	24,890	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『산내 달궁마을 마을상수도 이용 시설공사』관급 자재 구입(보조기층)	3,047	-	3,047	◦집행완료
	『산내 달궁마을 마을상수도 이용 시설공사』관급 자재 구입(메쉬휀스)	2,919	-	2,919	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『산내 달궁마을 마을상수도 이용 시설공사』관급 자재 구입(레미콘)	3,952	-	3,952	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『산내 달궁마을 마을상수도 이용 시설 전기공사』시행	7,530	-	7,530	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『이백 문화마을 기능상실 마을 상수도 철거공사』 관급자재 구입(레미콘)	962	-	962	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『이백 문화마을 기능상실 마을 상수도 철거공사 폐기물위탁처리 용역』시행	6,000	-	6,000	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	『산내 팔랑마을 마을상수도 이용 시설공사』관급 자재 구입(메쉬휀스)	2,710	-	2,710	◦집행완료
	2021회계연도 상수도공기업 특별회계 회계감사 용역	7,000	-	7,000	◦2022. 3월 내 집행 예정
	주생 도산마을 광역상수도 마을권 급수공사	40,621	23,600	17,021	◦집행완료
	주생 도산마을 광역상수도 마을권 급수공사 관급(아스콘)	19,839	-	19,839	◦집행완료
	고죽동 고죽마을 광역상수도 배수관 매설공사 GIS DB 구축용역	10,432	-	10,432	◦추진상황: 준공 ◦금후계획: 이월액 집행(`22. 3. 31.)
	고죽동 고죽마을 광역상수도 배수관 매설공사 관급자재(레미콘) 변경구입	8,853	-	8,853	◦추진상황: 준공 ◦금후계획: 이월액 집행(`22. 3. 31.)
	고죽동 고죽마을 광역상수도 배수관 매설공사 관급자재(아스콘) 변경구입	6,631	-	6,631	◦추진상황: 준공 ◦금후계획: 이월액 집행(`22. 3. 31.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(1공구)	81,483	-	81,483	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 6. 30.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(1공구) GIS DB 구축용역	22,958	-	22,958	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 6. 30.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(1공구) 폐기물처리 용역	3,510	-	3,510	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 6. 30.)
	광치동 호치마을 광역상수도 배수관 매설공사(1공구) 관급자재(아스콘)	9,239	-	9,239	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 6. 30.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(2공구)	29,035	-	29,035	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(2공구) GIS DB 구축용역	8,999	-	8,999	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(2공구) 관급자재(레미콘)	4,836	-	4,836	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	광치동 호치마을 광역상수도 급수관 매설공사(2공구) 폐기물처리 용역	4,274	-	4,274	◦추진상황: 동절기 공사 중지 ◦금후계획: 준공 및 이월액 집행 (`22. 3. 31.)
	구인월마을 상수도공사	176,111	49,000	127,111	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	구인월마을 상수도공사 GIS DB 구축용역	30,709	-	30,709	◦집행완료
	구인월마을 상수도공사 관급자재(레미콘)	12,362	12,051	311	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	구인월마을 상수도공사 관급자재(수도관)	10,752	-	10,752	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	구인월마을 상수도공사 관급자재 (수도관이음관 외)	9,465	8,566	899	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	구인월마을 상수도공사 관급자재(아스콘)	44,093	-	44,093	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	구인월마을 상수도공사 관급자재(용접철망)	4,199	-	4,199	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업 GIS DB 구축용역(2차분)	21,748	-	21,748	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업 폐기물 처리 용역(2차분)	32,036	-	32,036	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(2지구)	57,224	8,376	48,848	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분)	182,106	30,030	152,076	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급(수도관)	11,626	-	11,626	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급(아스콘)	102,888	62,310	40,578	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급(제수밸브 외)	7,911	-	7,911	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	수지 고평지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급추가(아스콘)	23,107	-	23,107	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 7월 내 준공 예정
	아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업 GIS DB 구축용역(2차분)	36,075	25,000	11,075	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분)	333,228	297,000	36,228	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업 폐기물 처리용역(2차분)	77,368	54,000	23,368	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급	11,923	-	11,923	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급(레미콘)	36,637	25,527	11,110	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	아영 오산지구 농어촌생활용수 개발사업(2차분) 관급(아스콘)	153,530	147,352	6,178	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 6월 내 준공 예정
	지리산권역 (아영,인월,산내) 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역 (1차분)	300,000	240,000	60,000	◦1차분 실시설계용역 준공 (2022. 2. 22.)
	자연방사성물질 검출지구(주천 배촌, 덕촌지구) 상수도공사 관급(아스콘)	139,127	96,938	42,189	◦집행완료
	자연방사성물질 검출지구(주천 배촌,덕촌지구) 상수도 공사	386,821	148,800	238,021	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	자연방사성물질 검출지구(주천 배촌,덕촌지구) 상수도공사 GIS DB구축용역	58,745	29,370	29,375	◦준공 (2022. 2. 21.)
	자연방사성물질 검출지구(주천 배촌,덕촌지구) 상수도공사 폐기물처리 용역	62,529	43,770	18,759	◦동절기 공사 중지(2021. 12.) ◦2022. 4월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분) (토목) 관급 (신축이음관)	4,867	-	4,867	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 (3차분) (토목) 관급 (레미콘)	347,867	242,381	105,486	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 (3차분)(토목) 관급(이형철근) 변경구입	289,564	224,763	64,801	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 (3차분)(토목) 관급(주철관)	93,719	65,299	28,420	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급(응집기)	432,000	166,000	266,000	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재(방충망) 추가 구입	7,752	-	7,752	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재 (부스터펌프) 구입	15,092	-	15,092	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재(수중펌프) 추가구입	28,083	-	28,083	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재(원심펌프) 추가구입	47,951	33,565	14,386	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재(크레인)	41,260	20,630	20,630	◦집행완료
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재 (편흡입벌류트펌프)	103,841	83,072	20,769	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급자재(호이스트)	22,440	11,220	11,220	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 기계공사(3차분) 관급추가 (약품투입기)	123,860	86,702	37,158	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 토목,건축,기계, 조경(3차분) 관급자재 (부단수제수밸브)	29,440	20,512	8,928	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 토목,건축,기계, 조경(3차분) 관급자재(제어반) 추가 구입	10,450	-	10,450	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 폐기물처리용역 (3차분)	104,130	-	104,130	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분) (건축) 관급(이형철근)	47,359	36,457	10,902	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분) (건축) 관급(자연석판석)	7,846	-	7,846	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분) (토목) 관급(주철관)	6,028	4,200	1,828	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분) 관급자재(전동버터플라이밸브)	161,905	112,809	49,096	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분) 관급자재(제수밸브)	29,681	20,680	9,001	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분)(건축) 관급(레미콘)	25,003	-	25,003	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분)(토목) 관급 추가 (이형철근)	32,630	-	32,630	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(3차분)(토목) 관급(제수밸브)	32,023	22,615	9,408	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(건축)(3차분) 관급추가(이형철근)	34,391	-	34,391	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(전기 및 계측제어) (3차분)	670,420	272,349	398,071	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(토목)(3차분) 관급추가(이형철근)	38,470	-	38,470	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업(토목,건축,기계, 조경)(3차분) 기성금 지급(1회)	6,568,000	4,063,700	2,504,300	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 토목,건축,기계, 조경(3차분) 관급(방충망)	8,789	-	8,789	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 전기 및 계측제어(2차분) 관급 자재(감시제어) 설계변경(1회)	145,713	-	145,713	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 토목,건축,기계, 조경(2차분) 관급(단열프로 젝트 외) 변경구입	6,810	-	6,810	◦2022. 12월 내 준공 예정
	월락정수장 개량사업 토목,건축,기계, 조경(2차분) 관급자재 변경구입	39,415	-	39,415	◦2022. 12월 내 준공 예정
	남원시 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계 용역	113,924	79,740	34,184	◦용역 착수(`21.3.22.) ◦용역 중지(`21.8.2.) ◦재착수 및 완료(`22.5.)
	오거리 주변 노후 상수관 교체공사	128,481	71,000	57,481	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 GIS DB 구축용역	8,025	-	8,025	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후 상수관 교체공사 폐기물처리 용역	11,020	-	11,020	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (제수밸브보호통)	1,261	-	1,261	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (지수밸브보호통)	1,732	-	1,732	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (바닥포장제)	13,061	-	13,061	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (보도블럭)	6,474	-	6,474	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (수도관)	12,145	-	12,145	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (레미콘)	1,195	-	1,195	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)
	오거리 주변 노후상수관 교체공사 관급 (아스콘)	12,516	-	12,516	◦공사 중지(`21.6.8.) - 도시과 지중화사업 병행 추진 ◦재착공 및 준공(`22.3.~6.)