기업지원과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

구분	사 업 명		예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계(11)			14,398,884	8,453,804	5,810,190	*불용액(134,890천원) *명시,사고이월 중복 예산액 (5,378,170천원)
명시	소 계(5)		9,275,895	5,205,837	3,696,196	*사고이월(373,862천원)
	1	농공단지 조성 및 정비(전환)	400,000	237,704	162,295	∎인월농공단지 사면보강 및 도로정비공사 ◦도비송금 : 2021.04.20. ◦공사착공 : 2021.06.03. ◦공사준공 : 2021.11.09. ◦명시이월 잔액분 공사발주 : 2022.04.
	2	광치농공단지 복합문화센터 건립	3,071,813	0	3,071,813	◦최종선정 : 2021.09.29. ◦국비송금 : 2021.11.05. ◦건축기획 용역 : 2022.01 .~ 03. ◦도 투자심사 : 2022년 1분기 ◦설계공모 : 2022.04. ~ 06. ◦설계용역 : 2022.06. ~ 12.
	3	일반산업단지 조성사업	298,560	113,540	95,200	◦공사착공 : 2021.06.14. ◦공사중지 : 2022.02.15. ◦산업단지내 폐타이어 처리용역 발주예정(3월) *사고이월(89,821천원)
	4	남원 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업	5,079,610	4,753,891	41,678	◦공사착공 : 2020.06.25. ◦공공폐수처리시설 설계변경 시 증액분 지급예정(5월) *사고이월(284,041천원)
	5	남원 일반산단 하·폐수처리수 재이용시설 설치사업	425,912	100,702	325,210	◦실시설계용역 완료 : 2021.10.29. ◦남원 일반산단 하‧폐수처리수 재이용시설 설치사업 재원협의(전북지방환경청) 중이며 3월 중 발주 예정
사고	소 계(6)		10,501,159	8,115,398	2,113,994	*불용액(134,890천원) 명시이월(136,877천원)
	1	농공단지 시설 보수 및 관리	664,100	401,145	262,655	*불용액(300천원)
						∎남원 코스메틱 비즈센터 건립부지 주변 사면 복구공사 ◦이월액: 157,388천원 ◦설계용역 : 2021.10. ~ 11. ◦공사착공 : 2021.12.06. ◦공사중지 : 2021.12.12. ◦코스메틱 비즈센터 건립완료 이후에 재착공 : 2022.06.(예정)
						∎남원 노암제3농공단지 사후환경영향조사(운영시 2차년도) 용역 ◦이월액: 97,717천원 ◦용역착수 : 2021.03.24. ◦용역완료 : 2022.03.18.(예정)
						∎인월산업단지 보행자 시설 개선공사 외 1지구 실시설계용역 ◦이월액: 7,550천원 ◦용역착수 : 2021.12.28. ◦용역완료 : 2022.03.14.(예정)
	2	남원 일반산업단지 개발 계획 변경 용역 실시	43,960	0	43,960	◦용역착수 : 2021.11.22. ◦용역완료 : 2022.05.22.(예정)
	3	지역투자촉진	3,421,198	1,914,138	1,376,800	∎(주)코빅스 지방투자촉진 보조금 2차분 지급 ◦이월액: 1,376,800천원 ◦지급 완료 : 2022.02.16. (국비) 1,101,000 (도비) 193,000 (시비) 82,800 *불용액(130,260천원)
	4	일반산업단지 조성	298,560	113,540	89,821	*명시이월(95,199천원)
						∎남원일반산업단지 조성사업(2공구-2차분) ◦이월액: 52,096천원 ◦공사착공 : 2021.06.14. ◦공사중지 : 2022.02.15. ◦공사준공 : 2022.05.(예정)
						∎남원일반산업단지 조성사업(2공구) 건설폐기물처리 용역 ◦이월액: 24,160천원 ◦용역착수 : 2021.06.09. ◦용역중지 : 2021.11.22. ◦중지사유 : 일반산업단지 조성사업 (2공구) 2차분 공사중지로 인한 용역중지
						∎남원일반산업단지 조성사업(2공구) 지적확정측량용역 ◦이월액: 13,565천원 ◦용역착수 : 2021.11.11. ◦용역완료 : 2022.05.09.(예정)
	5	일반산업단지 조성 (2020년 명시이월)	183,731	160,688	23,043	∎남원일반산업단지 조성사업(2공구) 지적확정측량용역 ◦용역착수 : 2021.11.11. ◦용역완료 : 2022.05.09.(예정)
	6	남원 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업	5,889,610	5,525,887	317,715	*명시이월(41,678천원)
						∎남원 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업(1단계/3차분) ◦이월액: 247,640천원 ◦공사착공 : 2021.06.25. ◦진행상황 : 종합시운전 (2021.09.~2022.05.) ◦공사준공 : 2022.05.(예정)
						∎남원 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업(소방-2차분) ◦이월액: 36,401천원 ◦용역착수 : 2021.04.07. ◦용역중지 : 2021.12.20. ◦중지사유 : 공공폐수처리시설 종합시운전 기간 연장으로 인한 중지
						∎남원 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업(1단계) 건설사업관리용역(2차분) ◦이월액: 33,674천원 ◦용역착수 : 2021.02.01. ◦용역완료 : 2022.05.(예정) *불용액(4,330천원)