농정과

□ 2021년도 명시․사고 이월사업 추진상황

(단위 : 천원)

구분	사 업 명	예산액	집행액	이월액	추진상황 및 금후계획
총 합 계		8,838,074	3,129,926	5,708,148
명시	소 계	5,261,698	2,067,018	3,194,680
	농업인턴제를 활용한 창농지원	19,797	9,295	10,502	-고용 유지 농업인턴에 대한 3년차 인센티브 지급예정(2명, 분기별 1회)
	외국인근로자 주거지원사업 (상담관리)	10,001	450	9,551	-주거시설 완공 후 상담관리 실시 예정 (남원시다문화센터)
	농로확포장(보조)	173,000	-	173,000	◦예산재배정 : 2022.1.10. - 수지호곡 농로정비공사 - 대강사석 떡바람골 농로정비 - 아영초등학교앞 농로정비공사 ◦공사완료예정 : 2022.5.31.
	용배수로 현대화(보조)	867,000	-	867,000	◦예산재배정 : 2022.1.10. - 대강 가덕마을 앞 구거 정비공사 - 송동장포마을 배수로 정비공사 - 대강 월산 지적덕골 배수로 정비공사 ◦공사완료예정 : 2022.5.31.
	재난위험시설 보수사업	1,950,000	-	1,950,000	◦공기관 등 자본적 위탁사업비 교부결정 : 2022.3.18.
	경지정리사업(보조)	2,241,900	2,057,273	184,627	◦관급자재 지급 : 2022.4.28. - 대강신입암지구 경지정리사업
사고	합 계	3,576,376	1,062,908	2,513,468
	외국인근로자 주거지원사업 (주거지원)	63,000	21,000	42,000	◦2농가 21,000천원 집행완료 ◦2농가 21,000천원 집행예정(공사중)
	쌀경쟁력제고(소규모 육묘장 지원)사업	162,000	120,000	42,000	◦2022.3월 준공 및 지급완료
	경지정리 배수보완사업	81,202	-	81,202	◦동절기 공사중지 : 2022.2.16. ◦공사완료예정 : 2022.4.28.
	경지정리사업(보조)	863,656	533,206	330,450	◦ 관급자재 검수 : 2022.3.31. ◦ 공사완료예정 : 2022.4.28.
	관정양수장 보수	56,080	-	56,080	◦ 공사완료예정 : 2022.4.28.
	기초생활인프라 (기계화경작로)(전환)	21,880	11,033	10,847	◦ 용역완료 : 2022.3.1. - 도통고산지구 실시설계용역 ◦ 용역비지급 : 2022.3.18.
	농로 확포장	418,466	58,762	359,704	◦공사완료예정 : 2022.5.31. - 율치마을 뒷산 농로정비공사 - 삼화뒷들 농로포장공사 - 덕동윗들 농로포장공사 - 수지산촌마을 뒷골농로포장공사 - 운봉 공안리 수철마을 농로포장공사
	농업기반정비(논밭작물재배사업)(전환)	23,925	9,369	14,556	◦용역완료 : 2022.2.26. - 산동부절지구 실시설계용역 1차분 ◦용역비지급 : 2022.3.18.
	농업기반정비(수리시설개보수)(전환)	341,935	145,507	196,428	◦공사완료예정 : 2022.4.30. - 인월 상우ㆍ하우뜰 공사 ◦용역완료예정 : 2022.3.30. - 금지 상귀마을 용역 - 사매 오신지구 용역 - 아영 사심골 용역 - 신평지구 용역 - 인월 상우ㆍ하우뜰(2,3공구)
	수리시설 개보수	6,806	-	6,806	◦ 용역완료예정 : 2022.3.30. - 수촌마을 외 4지구 용역
	수해복구	886,345	20,957	865,388	◦공사완료예정 : 2022.4.30. - 행정지구 재해복구 : 2022.4.30. - 흑송제 재해복구 : 2022.4.30. - 구곡제 재해복구 : 2022.4.30
	수해복구(농림부)	707	-	707	◦관급자재(금성지구) 검수 : 2022.3.31.
	수해복구(행안부)	163,388	50,264	113,124	◦관급자재 검수(송치지구) : 2022.3.31. ◦공사완료예정(송내지구) : 2022.4.30.
	용배수로 현대화	375,998	31,152	344,846	◦공사완료예정 : 2022.5.30. - 동서내 양수장 집수암거공사 - 신월양수장 공사 - 옥전2 용배수로 정비공사 - 내동 내척길 배수로 정비공사
	용배수로 현대화(보조)	7,500	253	7,247	◦관급자재(대산면 감동마을 배수로 정비사업) 검수 : 2022.1.10.
	농업용관정개발	60,500	29,000	31,500	◦관정개발 착공 : 2022.01 ◦관정개발 준공 : 2022.5.30.
	저수지 시설보강	23,658	23,496	162	◦ 시설부대비 지급 : 2022.3.30.
	한발대비 용수개발(보조)	19,330	8,909	10,421	◦ 공사완료예정 : 2022.3.31. - 중형관정공사(대산면)