환 경 사 업 소

남원(3단계) 하수관로 확장사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 남원 및 운봉처리구역내 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원

- 운봉읍, 주천면, 이백면, 동충동, 노암동, 왕정동, 향교동, 도통동

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023

◦ 사업내용 : 하수관로 L=38.8㎞, 배수설비 1,760여 가구

◦ 총사업비 : 378.18억원(국비 221.28, 시비 156.90)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	378.18	227.14	109.67	41.37	0.00
국 비	221.28	189.15	3.17	28.96
도 비	0.00
시 비	156.90	37.99	106.50	12.41
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행	: 2017. 12. ~ 2019. 12.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2019. 9. ~ 10.

◦ 공사 착공	: 2020. 2.

□ 금후계획

◦ 공사 시행	: 2022. 3. ~ 2023. 12.

남원처리구역 하수관로 확장사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 남원처리구역내 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면 용담외 15개마을

- 주천(용담ㆍ안곡), 송동(태동), 주생(부동ㆍ중동ㆍ상동ㆍ대지ㆍ소지ㆍ제천ㆍ서만), 대산(서원초),  산동(목동), 신촌동, 왕정동(화정ㆍ한우물), 광치동(광석)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024

◦ 사업내용 : 하수관로 L=16.2㎞, 배수설비 730여 가구

◦ 총사업비 : 172.70억원(국비 120.89, 시비 51.81)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	172.70	9.75	16.01	58.78	88.16
국 비	120.89	3.81	11.56	42.21	63.31
도 비	0.00
시 비	51.81	5.94	4.45	16.57	24.85
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행	: 2020. 6. ~ 2022. 4.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2022. 3.

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2022. 3. ~ 5.

◦ 공사 시행	: 2022. 6. ~ 2024. 12.

아영인풍지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 아영면 및 인월면 일원 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원

- 아영(봉대ㆍ외인ㆍ내인ㆍ매산ㆍ서갈ㆍ동갈), 인월(덕실ㆍ연실ㆍ자래ㆍ외건ㆍ내건ㆍ지산ㆍ흥부놀부촌ㆍ흥부골)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2024

◦ 사업내용 : 하수관로 L=15.4㎞, 배수설비 450여 가구

◦ 총사업비 : 160억원(국비 112, 시비 48)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	160.00	6.64	15.08	55.31	82.97
국 비	112.00	1.00	11.75	39.70	59.55
도 비	0.00
시 비	48.00	5.64	3.33	15.61	23.42
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행	: 2020. 6. ~ 2022. 4.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2022. 3.

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의 및 행정절차 이행	: 2022. 3. ~ 5.

◦ 공사 시행	: 2022. 6. ~ 2024. 12.

산내지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 산내면 일원 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원

- 산내면(상황ㆍ중황ㆍ하황ㆍ중기ㆍ삼화)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.6㎞, 배수설비 280여 가구

◦ 총사업비 : 78.65억원(국비 55.06, 시비 23.59)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	78.65	3.18	55.22	20.25	0.00
국 비	55.06	0.60	39.22	15.24
도 비	0.00
시 비	23.59	2.58	16.00	5.01
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행	: 2020. 6. ~ 2021. 12.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2021. 11. ~ 12.

◦ 공사발주(조달청 계약의뢰)	: 2022. 1. 24.

□ 금후계획

◦ 공사 시행	: 2022. 3. ~ 2023. 12.

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 사매면 남원일반산업단지 주변마을 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원

- 사매면(손율ㆍ수월ㆍ덕평ㆍ인화)

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.4㎞, 배수설비 150여 가구

◦ 총사업비 : 50.25억원(국비 35.18, 시비 15.07)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	50.25	8.34	17.68	24.23	0.00
국 비	35.18	5.00	12.37	17.81
도 비	0.00
시 비	15.07	3.34	5.31	6.42
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 실시설계용역 시행	: 2020. 6. ~ 2021. 12.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2021. 11. ~ 12.

◦ 공사발주(조달청 계약의뢰)	: 2022. 1. 24.

□ 금후계획

◦ 공사 시행	: 2022. 3. ~ 2023. 12.

운봉지구 하수관로 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 운봉읍 일원 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 일원

- 운봉읍(엄계ㆍ삼산ㆍ행정ㆍ산덕ㆍ유평ㆍ용은ㆍ공안ㆍ수월ㆍ덕산ㆍ가장)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2026

◦ 사업내용 : 하수관로 L=8.3㎞, 배수설비 420여 가구

◦ 총사업비 : 80억원(국비 56, 시비 24)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	80.00	0.00	0.00	3.50	76.50
국 비	56.00			2.50	53.50
도 비	0.00
시 비	24.00			1.00	23.00
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: 2017. 02.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 시행	: 2023. 1. ~ 10.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2023. 11. ~ 12.

◦ 공사 시행	: 2024. 1. ~ 2026. 12.

아영 청계마을 하수관로 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 아영면 청계마을 일원 합류식 관로지역을 분류식으로 전환하고 개인정화조 폐쇄에 따른 악취 개선 및 주민 하수도 복지 향상

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면 청계마을 일원

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2024

◦ 사업내용 : 하수관로 L=1.0㎞, 배수설비 30여 가구

◦ 총사업비 : 25억원(국비 17.5, 시비 7.5)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	25.00	0.00	0.00	1.43	23.57
국 비	17.50			1.00	16.50
도 비	0.00
시 비	7.50			0.43	7.07
기 타	0.00

□ 추진상황

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: 2017. 02.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 시행	: 2023. 1. ~ 10.

◦ 환경부 재원협의 신청	: 2023. 11. ~ 12.

◦ 공사 시행	: 2024. 1. ~ 12.