상 수 도 사 업 소

남원시 노후 상수관망 정비 사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 노후 상수관을 정비하여 시민들에게 맑고 깨끗한 상수도를 안정적으로 공급하고 누수 · 적수 발생 등 생활민원 사전 예방 및 유수율 제고로 안전한 상수관망 구축이 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5개년)

◦ 사업내용 : 노후 상수관 정비 L=20.2㎞

◦ 총사업비 : 133억원(국비 93, 시비 40)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	133	0	0	20	113
국 비	93	-	-	14	79
시 비	40	-	-	6	34

□ 추진상황

◦ 남원시 노후 상수관로 정비 기본계획용역 완료	: `20.  3. ~ `21.  9.

- 한국수자원공사 위탁 시행 / 용역비 : 1.4억원(국비70%, 시비30%)

◦ 노후 상수도 정비사업 타당성 조사 용역 착수	: `21. 5. 24.

- 환경부, 한국수자원공사 공동 수행 (22.0억원, 24개월간)

□ 금후계획

◦ 노후 상수도 정비사업 타당성 조사 용역 완료 및 사업비 확정	: `23. 5.

◦ 사업 추진	: `23. 6. ~

지리산권역(아영·인월·산내) 농어촌생활용수 개발사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦운봉배수지 계통 농어촌생활용수 개발사업 지구(아영,인월,산내) 및 자연방사성물질 검출지구의 광역상수도 확대 공급, 산내면 급수지역 확대에 따른 상수도 공급량 부족으로 제2배수지 신설 필요

◦신설 배수지 설치에 따른 급수체계 개선으로 효율적인 급수 공급

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 산내면 일원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)

◦ 사업내용

- 배 수 지 : 신설 1개소(V=1,400㎥) / 운봉읍 가산리 방현마을

- 송수관로 : L=12.1km(D250mm) / 동화댐 수자원공사관로 분기

- 가 압 장 : 3개소 Q=2,630㎥/일 / 만항, 구선, 사치

- 배수관로 : L=21.9km(D80~250mm) / 아영신설 배수지~산내면

◦ 총사업비 : 155억원(도비 108.5, 시비 46.5)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024 이후
계	155	0	13	30	112
도 비	108.1	-	9.1	21	78
시 비	46.9	-	3.9	9	34

□ 추진상황

◦ 남원시 수도정비기본계획(변경 수립)               : `17. 1.

- 운봉배수지계통 운봉 제2배수지 신설 및 배수관로 계획 반영

◦ 지리산권역 농어촌생활용수개발사업 기본 및 실시설계용역 : `21. 11. ~ `22. 11.

□ 금후계획

◦ 배수지 및 송·배수관로 설치공사 시행            : `23. 1. ~ `25. 12