농 정 과

재해위험저수지 정비사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 노후 저수지 보강으로 재해 피해 사전 예방

◦ 수리시설 보강으로 안전영농 및 농업생산 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 위    치 : 수철제외 6개소

- ‘23 착공지구 : 금탄제

- ‘23 계속지구 : 수철제, 금곡제, 수동제, 침동제, 용궁1제, 노봉제

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 저수지 시설 보강 1식

◦ 총사업비 : 150억원(국비 75, 도비 30, 시비 45)            (단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	150	4.4	19	72.2	54.4
국 비	750	2.2	9.5	36.1	27.2
도 비	30	0.88	3.8	14.44	10.88
시 비	45	1.32	5.7	21.66	16.32
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

◦ 계속지구(수철제 외 5지구)

- 실시설계 추진	: ‘21. 03. ~ ‘22. 03.

◦ 신규지구(금탄제) 실시설계용역 추진	: ˊ22. 03. 04.

□ 금후계획

◦ 계속사업지구 사업시행	: ˊ22. 04. ~ ‘24. 12.

- 수철제, 금곡제, 수동제, 침동제, 용궁1제, 노봉제

◦ 신규사업지구(금탄제)

- 실시설계용역 시행	: ˊ22. 03. ~ 12.

- 공사 시행	: ˊ23. 03. ~ ‘25. 12.

재해위험저수지 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 노후 저수지 보강으로 재해 피해 사전 예방

◦ 수리시설 보강으로 안전영농 및 농업생산 경쟁력 강화

□ 개    요

◦ 위    치 : 수지 호곡(송계제), 주생 제천(제천1제), 사매 대신(대신1제), 수지 유암(유포제)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

◦ 사업내용 : 저수지 시설 보강 1식(제방ㆍ여방수로 보강, 비상수문 등)

◦ 총사업비 : 95억원(국비 47.5, 도비 19, 시비 28.5)          (단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	95	0	0	2	93
국 비	47.5			1	46.5
도 비	19			0.4	18.6
시 비	28.5			0.6	27.9
기 타	-			-	-

□ 추진상황

◦ 정밀안전진단	(D등급)	: ‘21. 12.

□ 금후계획

◦ 재해위험저수지 고시                            : ‘22. 03.

◦ 재해위험저수지 지정                            : ‘22. 04

◦ 2022년 신규사업 대상지 신청	: ‘22. 04.

◦ 실시설계 및 공사추진	: ‘23. 01. ~ ’26. 12.

세전지구 배수개선사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 집중 호우시 섬진강댐 수위 조절을 위한 방류량 증가로 인한 섬진강 외수위 상승으로 송동 세전지역 자연배제가 불가하여 지속적으로 침수 피해 발생함에 따라 배수개선 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 송동면 세전리 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5개년)

◦ 사업내용 : 배수펌프장 신설 1개소, 배수로 정비 5.6㎞ 등

◦ 총사업비 : 103.85억원(국비 103.85)                       (단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	103.85	0	3	20	80.85
국 비	103.85		3	20	80.85
도 비	-		-	-	-
시 비	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황

◦ 송동 세전배수장 주변 침수	: ‘20. 08. 08.

◦ 농림축산식품부 기획조정실장 면담	: ‘20. 10. 28.

◦ 2021년 배수개선사업 기본조사대상지 제출(시→도)	: ‘20. 12. 17.

◦ 기본조사대상지 현지점검	: ‘21. 01. 14.

◦ 중앙부처(농림축산식품부 간척지농업과) 출장	: ‘21. 03. 11./12. 27.

◦ 배수개선사업 대상지 선정	: ‘21. 04. ~ 05.

◦ 기본조사 최종보고(한국농어촌공사 전북본부↔농림부)	: ‘21. 12. 17.

□ 금후계획

◦ 기본조사 승인(농림부)	: ‘22. 03월말 예정

◦ ‘22년 배수개선사업 실시설계지구 선정	: ‘22. 04월말 예정

◦ 실시설계용역 시행	: ‘22. 05. ~ 12.

◦ 사업 시행	: ‘23. 02. ~ ’26. 12.

서천지구 배수개선사업

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 상습침수 농경지에 배수시설을 설치하여 농작물 침수피해 방지

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 서천리, 북천리, 준향리 일원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4개년)

◦ 사업내용 : 배수문 4개소(신설 2, 확장 2), 배수로 8조 2.78km

◦ 총사업비 : 35.71억원(국비 35.71)                         (단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	35.71	6.03	23.88	5.8	-
국 비	35.71	6.03	23.88	5.8	-
도 비	-		-	-	-
시 비	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황

◦ ‘20년 배수개선사업 신규착수 지구선정(농식품부)	: ‘20.6.8.

◦ 세부설계 착수	: ‘20.11.16.

◦ 주민설명회 개최(운봉읍 2회)	: ‘21.4.9./ 6.30.

◦ 시행계획 승인	: ‘21.10.29.

◦ 사업 착공	: ‘21.11.22.

- 배수로 8조 설치(개거설치) L=2.78km (공정율 20%)

□ 금후계획

◦ 용지보상 추진                                  : ‘22.3. ~

◦ 사업 추진                                      : ‘22.3. ~ ‘23.12.

방동지구 배수개선사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 농경지 침수 및 재해방지, 영농환경 개선하여 농지이용율과 농가소득 증대

□ 개    요

◦ 위    치 : 대강면 방동리, 신덕리, 방산리 일원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 배수장 신설 2개소, 배수문 신설 1개소, 배수로 확장 및

현대화 7조 3.3km

◦ 총사업비 : 96.8억원(국비 100%)                          (단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	96.80	0.00	0.00	5	91.8
국 비	96.80			5	91.8
도 비	0.00			-	-
시 비	0.00			-	-
기 타	0.00			-	-

□ 추진상황

◦ 전라북도 상습침수 구역 현황 제출	: ‵20. 09. 25.

◦ 배수개선사업 대상지 제출(지사 → 전북본부)     : ‵21. 11. 12.

□ 금후계획

◦ 기본조사지구 선정추진	: ‵22. 04월말 예정

◦ 세부설계 착수 지구 선정 추진	: ‵23. 06.

◦ 실시설계 및 공사 시행	: ‵23. 06. ~ ‵25. 12.