문 화 예 술 과

유곡리와 두락리 고분군 석축 및 배수로 정비사업

【국고보조, 신규】

□ 필 요 성

◦ 자연재해(집중호우·동절기·해빙기)로 인해 고분군의 토사유실이 빈번하게 이루어지고 있음

◦ 유산의 체계적인 보존관리를 위해서는 석축 및 배수로 정비 사업 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 유곡리와 두락리 고분군(국가지정문화재 사적) / 98,225㎡

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024(3년)

◦ 사업내용 : 고분군 석축 및 배수로 정비(400m)

◦ 총사업비 : 12억원(국비 8.4, 도비 1.8, 시비 1.8)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	12.00	0.00	0.45	5.78	5.77
국 비	8.40		0.31	4.04	4.05
도 비	1.80		0.07	0.87	0.86
시 비	1.80		0.07	0.87	0.86

□ 추진상황

◦ 석축 및 배수로 정비사업 설계용역 예산 확보        : `21. 12. 23.

□ 금후계획

◦ 석축 및 배수로 정비사업 설계용역 시행             : `22. 3.

◦ 문화재청 설계승인                                 : `22. 4.

◦‘23년도 문화재보수정비(총액계상)예산 확보          : `22. 9.

한옥자원활용 야간상설공연

【기금, 신규】

□ 필 요 성

◦ 관내 전통자원인 한옥경관을 활용한 야간 관광콘텐츠를 개발하고 상설 운영하여 국악공연의 대중화와 지역관광활성화에 기여

◦ 남원의 문화·역사를 소재로 한 국악창극공연으로 지역의 우수한 문화를 시민 및 관광객에게 제공하고 체류형 관광상품으로 활용

□ 개    요

◦ 위    치 : 예루원(남원시 월매길 12)
※관내 한옥건물 및 한옥경관 문화시설 변동 가능

◦ 사업기간 : 2023년 5 ~ 10월

◦ 사업내용
- 관내 한옥경관 자원을 활용한 지역특화 야간 상설공연
- 남원시의 대표 문화자원인 판소리 춘향가의 문화적 활용을 통한 창극공연

◦ 총사업비 : 2.21억원(국비 0.8, 도비 0.18, 시비 1.23,)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	2.42	0.00	0.00	2.42	0.00
국 비	0.94			0.94
도 비	0.25			0.25
시 비	1.23			1.23

□ 추진상황

◦ 2022 한옥자원활용 야간상설공연 공모선정	: `21. 12. 8.
※도내 5개시군 선정(전주시, 남원시, 임실군, 고창군, 부안군)

□ 금후계획

◦ 2023 한옥자원활용 야간상설공연 사업계획 수립	: `22. 9.

◦ 2023년도 공모사업 신청	: `22. 11.

만복사지 고증연구 및 디지털콘텐츠 개발

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 품격 있게 융성하는 역사문화도시로서 남원시의 다양한 자원과 연계하여 문화재와 함께하는 스마트탐방 서비스 모델 개발 필요

◦ 다양한 포맷과 매체로 활용이 가능한 디지털콘텐츠 제작 및 보급으로 우리 문화유산의 가치 국내외 확산 및 인지도 상승

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 만복사길 10-5 일원(왕정동)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년)

◦ 사 업 량 : 만복사지 발굴조사 및 고증연구, 디지털 콘텐츠 개발

◦ 총사업비 : 20억원(국비 14, 도비 3, 시비 3)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	20.00	0.00	1.25	2.75	16.00
국 비	14.00		0.88	1.92	11.2
도 비	3.00		0.185	0.415	2.4
시 비	3.00		0.185	0.415	2.4

□ 추진상황

◦ 화장실 신축, 정비계획 수립, 방재시스템 구축	: `17.~ `19.

◦ 미발굴지 및 선대유구 확인을 위한 시굴조사 진행중(0.25억)	: `22. 2.~ 5.

□ 금후계획

◦ 스마트 탐방안내 시스템 정보화전략계획 수립 추진(1억)	: `22.

◦ `23년도 발굴조사 및 콘텐츠 개발 예산 확보           : `22. 9.

유곡리와 두락리 가야고분군 종합정비

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 유곡리와 두락리 고분군은 학술적 가치를 인정받아 가야고분군 세계유산등재 대상에 선정된 중요 유적으로 고분군의 보존 및 활용방안 마련을 위한 유적정비 사업 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 유곡리, 아영면 두락리 일원 / 98,225㎡, 40필지

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2028(10년)

◦ 사 업 량 : 유곡리와 두락리 고분군 발굴조사 및 정비사업

◦ 총사업비 : 226.3억원(국비 68.68, 도비 73.75, 시비 83.87)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	226.30	59.54	2.33	14.00	150.43
국 비	68.68	14.67	1.63	9.8	42.58
도 비	73.75	17.38	0.35	2.1	53.92
시 비	83.87	27.49	0.35	2.1	53.93

□ 추진상황

◦ 유곡리와 두락리 고분군 국가문화재 사적 지정         : `18. 3. 28.

◦ 고분군 내 사유지 매입완료                           : `20. 12.

◦ 고분군 주변정비                                     : `21. 5.

- 수목·탐방로·발굴지·시굴지·안내판·경관정비, 폐기물처리 등

□ 금후계획

◦ 종합정비계획을 수립하여 문화유산의 체계적인 보존관리 추진 : `22. 1.~

남원읍성 복원정비

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 사적 남원읍성은 통일신라시대 9주 5소경 중 남원경이며, 정유재란 당시 왜적에 대응해 대규모의 항전이 이루어졌던 곳으로 그 의의를 기념하고 복원정비를 통한 문화유산 계승 및 활용 기대

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 364-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2016 ~ 2025(10년)

◦ 사 업 량 : 전체 3.4km 중 북문과 북성벽 약 600m 구간 복원정비

※ 광복 70주년 일제강점기 문화재 복원 프로젝트 선정

◦ 총사업비 : 330억원(국비 231, 도비 49.5, 시비 49.5)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	330.00	93.10	5.04	10.00	221.86
국 비	230.99	65.17	3.52	7.0	155.3
도 비	49.50	13.96	0.76	1.5	33.28
시 비	49.51	13.97	0.76	1.5	33.28

□ 추진상황

◦ 토지매입 완료구간 시설물 정비공사 설계 진행	: `21. 7.~ 11.

◦ 사적추가지정 토지매입 완료 구간 철거공사 추진	: `22. 2.~ 6.

◦ 발굴조사 완료구간 설계 진행중	: `22. 2.~ 5.

□ 금후계획

◦ 사적추가지정 발굴조사 완료 구간 정비공사 추진	: `22. 6.~

◦ 토지매입 및 발굴조사․정비 추진	: `22.~

남원읍성 디지털 기술활용 정비방안연구

【국고보조, 계속】

□ 필 요 성

◦ 남원읍성은 통일신라시대 초축된 이후 근현대까지 역사가 층위를 이루며 다양한 시대 유적들이 복합된 도시유적으로 정비․복원 사업을 진행함에 있어 보다 과학적이고 체계적인 접근 방법이 필요

◦ 남원읍성의 정비요소와 정비방법, 정비 복원 수준 등을 다각적으로 검토하고 위험 요소들을 배제하기 위하여 디지털 기술 활용 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 364-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023(3년)

◦ 사업내용 : 남원읍성 현황조사 분석을 통한 3D 공간정보 및 DB구축하고 이를 기반으로 구축된 남원읍성 디지털 자료를 토대로 XR 기술로 결과물 시각화

◦ 총사업비 : 3.5억원(국비 2.45, 도비 0.52, 시비 0.53)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	3.50	1.50	2.00	0.00	0.00
국 비	2.45	1.05	1.4
도 비	0.52	0.22	0.3
시 비	0.53	0.23	0.3

□ 추진상황

◦ 읍성 북성문 및 북성벽 디지털 고증조사 기록화 용역 진행	: `21. 11.~ `22. 10.

◦ 정비방안 디지털화 제시방안 용역 예산 확보	: `21. 12. 23.

□ 금후계획

◦ 남원읍성 정비방안 디지털화 제시방안 용역 시행	: `22. 6.~

남원시 복합형 공공도서관 건립

【균특, 계속】

□ 필 요 성

◦ 세대가 공감하고 지역주민의 행복과 삶의 기반이 되는 문화시설 확충

◦ 시민들의 정보이용, 독서(문화) 활동 및 평생교육을 통해 삶의 만족도 증대

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 343-8 외 2필지

◦ 사업기간 :  ̀21년 ~  ̀23년 (3년)

◦ 사업내용 : 복합형 공공도서관 건립 (연면적 3,457.67㎡)

- 공공도서관(서가, 열람실 등) + 생활문화센터(동아리실, 다목적공간 등)

◦ 총사업비 : 118억원(국비 59, 시비 59)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	118.00	9.00	65.00	44.00	0.00
국 비	59.00	9.00	28.00	22.00
시 비	59.00		37.00	22.00

□ 추진상황

◦ 건축 설계공모	: `21. 4.~ `21. 7.

◦ 건축 설계공모 심사위원회 개최(당선작선정)	: `21. 7. 7.

◦ 기본 및 실시설계	: `21. 8. 2.~ `22. 2. 27.

※ 행정절차 이행에 따른 용역 중지          : `22. 2. 24.

◦ 복합형 공공도서관 설계용역 최종보고회     : `22. 3. 8.

□ 금후계획

◦ 계약심사 및 일상감사                      : `22. 3.~ 4.

◦ 공사 발주                                 : `22. 5.

◦ 공사 준공 및 개관준비                     : `23. 12.

유곡리와 두락리 고분군 홍보관 건립

【균특, 계속】

□ 필 요 성

◦ 현재 마을 뒤편의 간이건물을 임차하여 고분군을 전시·홍보하고 있는 상태로 유적의 관람여건이 매우 열악한 실정임. 체계적인 문화유산의 보존관리와 관람객의 편의성 증진을 위해 홍보관 건립 필요

□ 개    요

◦ 위    치 : 유곡리와 두락리 고분군 일원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023(3년)

◦ 사업내용 : 고분군 홍보관 건립(전시·교육 및 편의시설 조성)

◦ 총사업비 : 45억원(균이 22, 도비 11, 시비 12)

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	2022	2023	2024이후
계	45.00	5.50	14.50	25.00	0.00
국 비	22.00	2.50	7.0	12.5
도 비	11.00	1.25	3.5	6.25
시 비	12.00	1.75	4.0	6.25

□ 추진상황

◦ 2020년 제2회 동부권 발전위원회 의결                   : `20. 6.

◦ 지방재정 투자심사 의결                                : `20. 11.

◦ 홍보관 건립을 위한 도시관리계획 결정 용역 시행        : `21. 2.

◦ 시 도시관리계획 결정 입안 및 심의                     : `21. 11.

□ 금후계획

◦ 전라북도 도시계획 위원회 심의                         : `22. 3.

◦ 매장문화재조사 및 실시설계용역 시행                   : `22. 4.

◦ 홍보관 건립 착공                                      : `22. 10.