2022. 10.

2022년 주요업무 추진실적

도  시  과

목        차

□ 일     반     현     황

□ 2022년 주 요 업 무  결산

□ 2022년 주요업무 추진실적

◦ 2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 도시가로망 정비사업(총괄)

◦ 지리산IC 진입도로 개설공사

◦ 천왕봉로 대로 개설공사

◦ 금암길 중로 개설공사

◦ 만인로 중로 개설공사

◦ 가방뜰길 중로 개설공사

◦ 호치길 도로 정비공사

◦ 식정 관광 우회도로 개설공사

◦ 그린뉴딜(중앙초)어린이통학로 지중화사업

◦ 그린뉴딜(용성초)어린이통학로 지중화사업

◦ 그린뉴딜(도통초)어린이통학로 지중화사업

◦ LX드론활용센터 지중화사업

◦ 도시재생 예비사업

◦ 도시재생사업 홍보 및 운영

◦ 도시재생 활성화계획 수립

◦ 생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업

◦ 터미널지구 도시재생 뉴딜사업

◦ 도시재생 인정사업(구.미도탕)

◦ 도시재생 지원센터 운영

◦ 도시재생 거점시설 운영

◦ 금암공원 조성

◦ 도시공원 내 사유지 매입

◦ 어린이공원 새단장

◦ 만인공원 광장 및 교차로 개선사업

◦ 왕정공원 산림욕장 운영

◦ 쾌적한 도시공원 유지관리

◦ 왕정공원 숲속야영장 조성사업

일  반  현  황

□ 기    구

							도 시 과 장
							백 강 규
도시계획담당				도시정비담당							도시재생담당				공원담당
성 월 계				노 경 록							강 자 청				김 인 규
∘도시기본·관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정 및 인가 ∘지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리				∘도시가로망 정비계획 수립 ∘도시가로망사업 시행 (대로,중로,소로) ∘지역개발사업 ∘전선 지중화 사업 ∘장기미집행시설 (도로)해소							∘도시재생뉴딜사업 ∘도시재생인정사업 ∘도시재생 전략 계획수립 ∘도시재생 활성화 계획 수립 ∘도시재생예비사업 ∘도시재생지원센터 운영				∘공원 녹지 기본 계 획(변경) 수립 ∘공원 조성 사업 추진 ∘물방개워터파크 운영 ∘왕정공원 산림욕장 및 숲속야영장 조성

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	20	1	4	7	5	3
현 원	20	1	7	4	- (휴직1)	8	공무직 3
증 감	-	-	3	△3	△5	5

2022년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 체계적 도시관리를 위한 도시기본계획 및 도시관리계획 수립(재정비) ◦ 도시가로망 정비로 시민편의 도모 및 안전한 도시기반 구축 ◦ 도시재생사업 추진을 통한 도시활성화 및 지역주민 삶의 질 제고 ◦ 시민 누구나 누릴 수 있는 쾌적하고 안전한 도심속 힐링공간 조성 및 정비

□ 보존과 개발이 조화를 이루는 도시관리계획 수립 및 정비

◦ 남원 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비로 체계적 도시 공간구조 마련

◦ 남원시 도시계획조례 정비(개정)으로 자원의 효율적 활용 도모

◦ 건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

- 제14대 남원시 도시계획위원회 구성 : 23명 (전체 23. 1분과 7. 2분과 7. 3분과 7)

- 전체분과위원회 : 3회 (도시관리계획(재정비) 결정(변경)안 등)

- 도시계획 심의(1분과위원회) 및 개발행위허가 : 16회 217건

□ 시민이 안전하고 편리한 도시가로망 조성

◦ 2022년 도시가로망 정비 : 7지구, L=7,454m (7.5km)

: 대로 1지구(L=2,000m), 중로 3지구 (L=2,110m), 소로 3지구(L=3,344m)

구 분	사 업 명	위 치	사 업 량(m)	총사업비	‘20년 까지	‘21년	‘22년	사업기간
계		7지구	L=7,454m	33,800	20,680	8,250	4,870
대로	소계	1지구	L=2,000m	12,500	10,400	1,600	500
	지리산 IC진입도로 〔도시··비도시구간〕	아영 인월	L=2,000m,B=25m	12,500	10,400	1,600	500	‘17~’22
중로	소계	3지구	L=2,110m	13,300	6,830	3,970	2,500
	금암길	노암	L=750m, B=15m	7,000	3,800	1,800	1,400	‘18~’22
	만인로	용정	L=1,100m, B=13.5m	4,200	2,400	1,000	800	‘18~’22
	가방뜰길	금동	L=260m, B=20m	2,100	630	1,170	300	‘20~’22
소로	소계	3지구	L=3,344m	8,000	3,450	2,680	1,870
	호치길	광치	L=2,800m, B=10m	5,000	3,000	1,000	1,000	‘18~’22
	서문3길	왕정	L=142m, B=6m	1,500	130	1,000	370	‘20~’22
	서무1길	인월	L=402m, B=8m	1,500	320	680	500	‘20~’22

□ 도시활력 제고를 위한 도시재생사업 추진

◦ 도시재생예비사업을 통한 도시재생 뉴딜사업 추진 기반 확보 및 활성화계획 수립용역을 통한 `23년 도시재생 뉴딜사업 공모 대응

- 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 청년문화창업공간 및 거점시설 운영 지원을 통한 지역경제 활성화 도모

- 제7회 도시재창조한마당 우수사례 경진대회 우수상 수상(나우원)

◦ 도시재생사업지구 내 스마트기술 도입을 통한 지역주민 삶의 질 제고

◦ 거점시설 조성을 위한 이음센터 조성공사, 숲정이마을 공유마당 및 (구)미도탕 문화저장소 실시설계용역 추진

□ 쾌적하고 아름다운 도심속 휴식공간 조성 및 관리

◦ 왕정공원 산림욕장(산곡동 산29 일원) 30,000㎡ 조성완료 / 1,200백만원

◦ 왕정공원 숲속야영장(산곡동 산13 일원) 28,069㎡ 조성추진 / 2,400백만원

-  설계용역‘21. 09. / 행정협의‘22. 04. / 고시 및 착공‘22. 05.

◦‘야간경관이 특화된 생태근린공원’금암공원 조성 차질없는 추진

- 1단계 사업완료 :‘20. 04. ~‘22. 06. / 7,000백만원

(인도교, 데크산책로, 종탑복원, 숲속놀이터, 제2주차장, 금수정 경관조명 등)

- 2단계 사업추진 :‘22. 10. ~ ‘23. 12. / 3,200백만원

(수국테마경관 식재, 포토존, 경관조명, 까페전망대 등)

◦ 도시공원내 사유지 매입 : 향교공원 외 5개소 / 506천㎡(39%)

◦ 어린이공원 새단장 완료 : 2개소 (주천송치, 이백서곡) / 100백만원

2022년 주요업무 추진실적

2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업 범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업 기간 : 2019 ~ 2022년

◦ 사업 내용 : 도시기본계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 사 업 비 : 총 1,444백만원 (2021년 사고이월 : 444백만원)

□ 추진실적

< 도시기본계획 수립>

◦ 기초조사 및 현황분석 (시민참여단운영 4회)       : ‘19. 07. ~ ‘19. 12.

◦ 도시기본계획 입안보고	: ‘20. 08. 20.

◦ 주민의견 수렴(공청회) 개최	: ‘21. 03. 18.

◦ 시의회 의견청취	: ‘21. 03. ~ 04.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문	: ‘21. 08. 10.

◦ 도시기본계획 승인신청(남원시 → 전라북도)       : ‘22. 05.

◦ 국토계획평가(국토교통부) 협의 추진중	: ‘22. 06. ~ 09.

< 도시관리계획 수립>

◦ 기초자료 및 관련자료 수급, KLIS 등재사항 검토 및 정비 등

◦ 장기미집행시설 전수 조사 및 관련도서 작성	: ‘19. 08. ~ 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(1차/2차)	: ‘20. 07. / 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(3차)	: ‘22. 02.

◦ 도시관리계획(재정비) 입안, 의견청취, 의회의견청취	: ‘22. 03. ~ 04.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문 및 심의	: ‘22. 05. 23.

◦ 전라북도 관련부서, 산림청, 환경청 협의 추진중  : ‘22. 06. ~ 10.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 전라북도 부서 협의 시 계획인구 중 귀농귀촌인구 추가 반영(1,400명 → 4,200명)  권고가 있어 국토계획평가(국토교통부) 협의 지연

□ 2022년 9월중 국토계획평가(국토교통부) 협의 완료하여 연내 2040 도시기본계획 및 2030 도시관리계획(재정비) 수립 완료 추진

<도시기본계획 수립>

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘22. 11.

<도시관리계획(재정비)>

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘22. 11.

도시기본계획

◇ 미 래 상 : 남원에 머무는 모두가 시민이 되는 오고싶고 살고싶은 “문화관광도시 남원”

◇ 계획인구 지표 설정

구분		2020	2025	2030	2035	2040	비고
			1단계	2단계	3단계	4단계
통계청 인구추계	남원시	77,539	75,871	74,790	74,162	73,924
	105% 적용시	81,416	79,665	78,530	77,870	77,620
상주 인구(계획인구)		82,045	80,404	79,635	79,121	80,630
주간 활동 인구(체류인구)			16,256	17,245	18,192	19,065
인구지표(안) (총괄)	총계	97,280	96,600	97,025	97,223	99,695
	최종적용	97,000	97,000	97,000	97,000	100,000

※ 인구의 지속적 감소 및 유출에 대응하기 위해 관광체류형 인구 지표 수립 반영

	도시관리계획(재정비)
◇ 시간적 범위(기준년도 / 목표연도) : 2020년 / 2030년 ◇ 공간적 범위 : 남원시 행정구역 일원(752.81㎢) ◇ 내용적 범위 : 용도지역, 용도지구, 지구단위계획, 성장관리계획, 도시계획시설 결정(변경) - 전라북도 결정사항 : 78건 / 용도지역(68지역), 용도지구(10지구)

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위  치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시행자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 384억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	67,336㎡	11,111㎡	5,860㎡	19,081㎡	도로,공원, 녹지,저류지 등
수용인구·세대수		2,807인 / 1,080세대

□ 추진상황

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: `17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식) : `18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: `18.12.31. ~ `19.05.30.

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도) : `20. 08. 14.

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 08. 21.

◦ 환지계획 관련 토지평가위원회 개최(2회)	: `20.10.14 / 12.16.

◦ 문화재 시굴조사 추진	: `20.12.14 ~ `21.06.

◦ 토지이용계획 변경(2차) 추진 및 승인	: `21. 02. ~ 10.

◦ 문화재 정밀발굴조사 추진	: `21. 07. ~ `22. 10.

◦ 실시계획 변경 인가 고시(1차)	: `22. 02. 25.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 문화재 조사결과 통일신라시대 남원소경, 고려시대 집단건물지 관련 유적이 발굴되어 역사공원 조성(문화재 이전복원) 및 중층유적 추가조서 이행 필요

◦ 문화재 보존을 위해 역사공원 부지 계획 및 사업성 개선을 위한 가처분면적(준주거용지) 확대 등 반영하여 토지이용계획 변경 추진

□ 토지이용 및 조성계획변경에 따라 사업 시행 일정 조정 필요

□ 인허가 및 공사를 병행 추진하여 착공시기 단축

□ 금후계획

◦ 문화재 보존방안 심의 및 발굴조사 완료	: `22. 09. ~ `23. 02.

◦ 개발 및 실시계획 변경인가	: `23. 06.

◦ 공사추진(LH)	: `23. 07. ~ `26. 12.

도시가로망 정비사업(총괄)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로개설 18지구, L=14.76㎞

◦ 총사업비 : 84,201백만원 (22년 예산 : 17,714백만원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년 (11개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2022년	2022이후	비고
계	18지구 (L=14.76km)	84,201	36,100	17,714	30,387
대 로	2지구 (L=2.39km)	15,000	12,150	900	1,950
중 로	3지구 (L=2.11km)	13,300	10,800	2,500	-
소 로	7지구 (L=7.62km)	24,200	8,359	5,770	10,071
지중화 등	6지구 (L=2.64km)	31,701	4,791	8,544	18,366

□ 추진실적

◦ 2022년 도시가로망 정비 : 7지구, L=7,454m (7.5km)

: 대로 1지구(L=2,000m), 중로 3지구 (L=2,110m), 소로 3지구(L=3,344m)

구 분	사 업 명	위 치	사 업 량(m)	총사업비	‘20년 까지	‘21년	‘22년	사업기간
계		7지구	L=7,454m	33,800	20,680	8,250	4,870
대로	소계	1지구	L=2,000m	12,500	10,400	1,600	500
	지리산 IC진입도로 〔도시·비도시구간〕	아영 인월	L=2,000m,B=25m	12,500	10,400	1,600	500	‘17~‘22
중로	소계	3지구	L=2,110m	13,300	6,830	3,970	2,500
	금암길	노암	L=750m, B=15m	7,000	3,800	1,800	1,400	‘18~‘22
	만인로	용정	L=1,100m, B=13.5m	4,200	2,400	1,000	800	‘18~‘22
	가방뜰길	금동	L=260m, B=20m	2,100	630	1,170	300	‘20~‘22
소로	소계	3지구	L=3,344m	8,000	3,450	2,680	1,870
	호치길	광치	L=2,800m, B=10m	5,000	3,000	1,000	1,000	‘18~‘22
	서문3길	왕정	L=142m, B=6m	1,500	130	1,000	370	‘20~‘22
	서무1길	인월	L=402m, B=8m	1,500	320	680	500	‘20~‘22

□ 금후계획

◦ 2023년 도시가로망 정비 : 10지구, L=6,989m

: 대로 1지구(L=386m), 소로 및 유지관리 3지구(L=3,860m),

장기미집행(도로) 보상 및 지중화 6지구(L=2,638m)

- 발주예정 (7지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로, 신촌소로, 그린뉴딜(중앙초, 용성초), LX드론활용센터 지중화, 중소도로 유지관리

- 실시설계 (2지구) : 고죽동 노인복지센터 지중화, 그린뉴딜(도통초)

- 보 상 중 (2지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로

구분	사업명	위치	사업량(m)	총사업비	‘20년 까지	‘21년	‘22년	‘22년이후	‘22년 추진계획	비고 (사업기간)
계		10지구	L=6,989	50,401 (6,004)	1,711 (250)	5,459 (1,989)	12,844 (1,150)	29,457 (2,615)		`17~`25
대로	소계	1지구	L=386	2,500	50	100	400	1,950
	천왕봉로	인월	L=386m B=25m	2,500	50	100	400	1,950	토지보상 공사발주	‘20~‘24
소로	소계	3지구	L=3,965m	14,900 (4,613)	861 (250)	1,298 (998)	3,600 (750)	9,141 (2,615)
	식정 관광 우회 도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000 (4,613)	541 (250)	998 (998)	2,500 (750)	7,961 (2,615)	토지보상 공사발주	‘19~‘25
	신촌소로	신촌	L=305m B=6m	900	20	-	300	580	토지보상 공사발주	‘20~‘23
	중소도로 유지관리사업	관내	L=700m	2,000	300	300	800	600	공사추진 토지보상	‘22. 1~12. (연례반복)
지중화, 기 타	소계	6지구	L=2,638	31,701 (1,391)	800	3,991 (991)	8,544 (400)	18,366
	장기미집행 (도로)보상	관내	48개 노선	20,676	800	2,000	2,380	15,496	토지보상	‘20~‘25
	그린뉴딜(중앙초) 지중화사업	향교5가 동림교	전선지중화 L=770m	3,505 (675)	-	1,275 (675)	1,680	550	공사추진	‘21~‘23
	그린뉴딜(용성초) 지중화사업	서문4가 (구)남원역 앞	전선지중화 L=660m	2,536 (316)	-	616 (316)	1,600	320	공사추진	‘21~‘23
	그린뉴딜(도통초) 지중화사업	도통640~637	전선지중화 L=578m	2,584 (400)	-	-	1,284 (400)	1,300	공사추진	‘22~‘23
	LX드론활용센터 지중화사업	주생	전선지중화 L=430m	1,100	-	100	1,000	-	공사추진	‘21~‘22
	고죽(노인복지) 지중화사업	고죽	전선지중화 L=200m	1,300	-		600	700	설 계 중	‘22~‘23

▣ 2022년 도시가로망 정비사업 총괄표

(단위:백만원)

구분	사업명	위치	사업량(m)	총사업비	‘20년 까지	‘21년	‘22년	‘22년이후	‘22년 추진계획	비고 (사업기간)
계			17지구 L=14,443	82,901 (6,004)	22,391 (250)	13,639 (1,989)	17,414 (1,150)	29,457 (2,615)		`17~`27
대로	소계		2개지구 L=2,386	15,000	10,450	1,700	900	1,950
	지리산 IC진입도로 〔도시··비도시구간〕	아영 인월	L=2,000m B=25m	12,500	10,400	1,600	500	-	공사완료	‘17~‘22
	천왕봉로	인월	L=386m B=25m	2,500	50	100	400	1,950	토지보상 공사발주	‘20~‘24
중로	소계		3개지구 L=2,110m	13,300	6,830	3,970	2,500	-
	금암길	노암	L=750m B=15m	7,000	3,800	1,800	1,400	-	공사완료	‘18~‘22
	만인로중로	용정	L=1,100m B=13.5m	4,200	2,400	1,000	800	-	공사완료	‘18~‘22
	가방뜰길 중로	금동	L=260m B=20m	2,100	630	1,170	300	-	공사완료	‘20~‘22
소로	소계		6개지구 L=7,309m	22,900,(4,613)	4,311 (250)	3,978 (998)	5,470 (750)	9,141 (2,615)
	호치길	광치	L=2,800m B=8~10m	5,000	3,000	1,000	1,000	-	공사완료	‘18~‘22
	식정관광 우회도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000 (4,613)	541 (250)	998 (998)	2,500 (750)	7,961 (2,615)	토지보상 공사발주	‘19~‘25
	서문3길소로	왕정	L=142m B=6m	1,500	130	1,000	370	-	공사완료	‘20~‘22
	서무1길소로	인월	L=402m B=8m	1,500	320	680	500	-	공사완료	‘20~‘22
	신촌소로	신촌	L=200m B=6m	900	20	-	300	580	토지보상 공사발주	‘20~‘23
	중소도로 유지관리사업	관내	L=700m	2,000	300	300	800	600	공사추진 토지보상	‘22. 1~12. (연례반복)
지중화, 기타	소계		6개지구 L=2,638	31,701 (1,391)	800	3,991 (991)	8,544 (400)	18,366
	장기미집행 도시계획시설(도로)보상	관내	48개 노선	20,676	800	2,000	2,380	15,496	토지보상	‘20~’25
	그린뉴딜(중앙초)어린이 통학로 지중화사업	향교5가 동림교	전선지중화 L=770m	3,505 (675)	-	1,275 (675)	1,680	550	공사추진	‘21~’23
	그린뉴딜(용성초)어린이 통학로 지중화사업	서문4가 (구)남원역 앞	전선지중화 L=660m	2,536 (316)	-	616 (316)	1,600	320	공사추진	‘21~‘23
	그린뉴딜(도통초)어린이 통학로 지중화사업	도통640~637	전선지중화 L=578m	2,584 (400)	-	-	1,284 (400)	1,300	공사추진	‘22~‘23
	LX드론 활용센터 지중화사업	주생	전선지중화 L=430m	1,100	-	100	1,000	-	공사추진	‘21~‘22
	고죽동 노인복지센터 지중화사업	고죽	전선지중화 L=200m	1,300	-		600	700	설 계 중	‘22~‘23

[참고] 도시가로망 정비계획(계속·신규예정)

(단위:백만원)

구 분	사업명	위치	사업량(m)	총사업비	‘20년 까지	‘21년	‘22년	‘22년이후	‘22년 추진계획	비고 (사업기간)
계		16지구	L=1,909	106,401 (6,604)	1,711 (250)	5,389 (1,989)	13,504 (1,150)	85,797 (3,215)		`20~`29
대로	소계	2지구	L=2,786	40,100	50	100	400	39,550
	천왕봉로	인월	L=386m B=25m	2,500	50	100	400	1,950	토지보상 공사발주	‘20~’24
	신정~조산 연결 대로	신정~송동	L=2,400m B=25m	37,600				37,600	토지보상 (장기미집행)	‘23~’29
중로	소계	3지구	L=2,410m	15,500			960	14.540
	산책길중로	조산	L=1,400m B=20m	5,400				5,400	토지보상 (장기미집행)	‘23~’26
	교룡중·소로	용정	L=410m B=15m	4,600			960	3,640	토지보상 (장기미집행)	‘23~’25
	광천남길중로	향교	L=600m B=20m	5,500				5,500	구암지구개발후보상	‘24~’27
소로	소계	3지구	L=3,375m	13,100 (4,613)	561 (250)	998 (998)	2,800 (750)	8,741 (2,615)
	식정관광 우회도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000 (4,613)	541 (250)	998 (998)	2,500 (750)	7,961 (2,615)	토지보상 공사발주	‘19~’25
	신촌소로	신촌	L=200m B=6m	900	20	-	300	580	공사추진	‘20~’23
	국민연금공단 옆 소로	동충	L=110m B=6m	200				200	토지보상 (장기미집행)	‘23~’24
그린 뉴딜 지중화	소계	6지구	L=3,638	15,025 (1,991)		1,991 (991)	6,164 (400)	6,870 (600)
	그린뉴딜(중앙초)지중화사업	향교5가 동림교	전선지중화 L=770m	3,505 (675)	-	1,275 (675)	1,680	550	공사추진	‘21~’23
	그린뉴딜(용성초) 지중화사업	서문4가 구)남원역	전선지중화 L=660m	2,536 (316)	-	616 (316)	1,600	320	공사추진	‘21~’23
	그린뉴딜(도통초) 지중화사업	도통640~637	전선지중화 L=578m	2,584 (400)	-	-	1,284 (400)	1,300	설계완료	‘22~’23
	그린뉴딜(운봉) 지중화사업	운봉초, 운봉중	전선지중화 L=1,000m	4,000 (600)	-	-		4,000 (600)	공모추진	‘23~’24
	LX드론활용센터 지중화사업	주생	전선지중화 L=430m	1,100	-	100	1,000	-	공사추진	‘21~’22
	고죽(노인복지) 지중화사업	고죽	전선지중화 L=200m	1,300	-		600	700	설계완료	‘22~’23
보상 기타	소계	2지구	L=700	22,676	1,100	2,300	3,180	16,096
	장기미집행 (도로)보상	관내	48개 노선	20,676	800	2,000	2,380	15,496	토지보상	‘20~’25
	중소도로 유지관리사업	관내	L=700m	2,000	300	300	800	600	공사추진	‘22. 1~12. (연례반복)

지리산IC 진입도로 개설공사

(계속사업)

지리산 IC

인월면사무소

남원

함양

도로개설

L=2.0㎞, B=25m

비도시계획구간

(L=1.1㎞)

광주

아영

개설완료

도시계획구간

(L=0.9㎞)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 서무리(현대주유소)~아영면 인풍리(지리산IC) 일원

◦ 사 업 량 : 도로 확포장 L=2㎞, B=25m (왕복4차로)

◦ 사 업 비 : 12,500백만원 / `22년예산: 500백만원

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2022 (6년)

□ 추진실적

◦ 지리산IC 진입도로(도시구간) 설계 및 공사 준공	: `17. 11. ~ `20. 12.

◦ 지리산IC 진입도로(비도시구간) 실시설계 용역	: `19. 01. ~ `19. 10.

◦ 지리산IC 진입도로(비도시구간) 1,2,3차분 공사시행	: `19. 12. ~ `21. 10.

◦ 지리산IC 진입도로(비도시구간) 4차분 공사 착공	: `21. 10. 15.

◦ 공사 준공	: `22. 09. 07.

천왕봉로 대로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 인월리 인월사거리 ~ 상우교

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=386m, B=25m

◦ 사 업 비 : 2,500백만원 (공사비 1,700 보상비 800) / `22년예산: 400백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 시행(주민설명회 6.10)	: `20. 02. 24. ~ 06. 22.

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 06. 22.

◦ 전북도 확포장 건의(국지도60호선)	: `20. 07. 24.

◦ 분할측량 및 보상계획 공고	: `21. 06. 10.

◦ 편입토지·지장물 보상금 산정 및 협의요청	: `22. 06. 13.

□ 금후계획

◦ 편입토지·지장물 손실보상 협의	: `22. 06. ~ 12.

◦ 공사 착공	: `23. 03.

금암길 중로 개설공사

(계속사업)

L = 0.8㎞,

B = 10m

교량1개소

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 시립국악단 입구~더라우APT 입구 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=0.8㎞, B=10m, 교량1개소(L=43m, B=10.8m)

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(공사비 6,000 보상비 1,000) / `22년예산 : 1,400백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역	: `18. 10. ~ `19. 10.

◦ 1차분 공사 준공(가옥 철거, 토공, 교량공)	: `19. 12. ~ `20. 12.

◦ 2차분 공사 준공(구조물공, 기층포장, 부대공)	: `21. 03. ~ `21. 12.

◦ 3차분 공사 착공(교면 및 표층 포장, 교통시설)	: `22. 03. 28.

◦ 공사 준공	: `22. 08. 08.

만인로 중로 개설공사

(계속사업)

사업구간

L=1.1km, B=13.5m

남원고

구.방송국

롯데마트

구암지구

용정교

회전교차로

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 남원고 앞 회전교차로 ~ 용정교 일원

◦ 사업내용 : 도로 확포장 L=1.1㎞, B=13.5m

◦ 사 업 비 : 4,200백만원 (시비 100%) / `22년예산 : 800백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: `18. 09. ~ `19. 03.

◦ 편입부지 협의 매수 추진	: `19. 04. ~

◦ 1·2차분 준공(가옥철거, 법면보강)	: `19. 12. ~ `21. 03.

◦ 3차분 준공(토공, 상·하수도공, 배수공)	: `21. 03. ~ `21. 12.

◦ 4차분 준공(포장, 안전시설, 교통표지판)	: `22. 06. 16.

가방뜰길 중로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 금동 휴먼시아@ ~ 새터마을 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=0.26㎞, B=20m

◦ 사 업 비 : 2,100백만원 (시비100%) / `22년예산 : 300백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2022년 (4년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역	: `19. 11. ~ `20. 03.

◦ 용지보상 추진	: `20. 05. ~ `22. 04.

◦ 1차분 공사 준공(토공, 폐기물, 배수공)	: `20. 07. ~ `21. 12.

◦ 2차분 공사 준공(상하수도, 구조물, 포장)	: `21. 06. 08. ~ `22. 06. 02.

◦ 3차분 공사 착공(안전시설, 도색, 부대공)	: `22. 06. 08.

◦ 공사 준공	: `22. 08. 30.

호치길 도로 정비공사

(계속사업)

국도17

광석마을

광치산업단지

호치마을

고산마을

정비완료[1공구]

L=1.1km, B=10m

[2공구] 도로정비

L=1.70km, B=8m

□ 개    요

◦ 위    치 : 향교동 광석마을 ~ 호치마을

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=2.8㎞, B=8~10m

◦ 사 업 비 : 5,000백만원 (시비 5,000) / `22년예산: 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: `18. 02. ~ `18. 12.

◦ 도로구역 결정 지형도면 고시	: `19. 04. 26.

◦ 1, 2, 3차분 공사 준공	: `19. 05. ~ `21. 10.

- 상수도, 우수공, 호안공, 구조물공, 교량공

◦ 4차분 공사 준공	: `22. 06. 17.

- 아스콘 포장, 안전시설, 부대공

식정 관광 우회도로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 식정동 갈치삼거리 ~ 요천교 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=2.96㎞, B=10m, 교량2개소

◦ 사 업 비 : 12,000백만원(국비 4,613 시비 7,387) / `22년 예산: 2,500백만원

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2027년 (9년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: `20. 01. ~ `20. 12.

◦ 노선선정에 따른 주민설명회 실시(2회)	: `20. 05. 12. ~ 13.

◦ 각종 제반 용역 추진	: `20. 03. ~ `21. 03.

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

◦ 편입토지 손실보상 산정 및 협의	: `21. 11. 05. ~

□ 금후계획

◦ 지역개발구역지정·사업시행자지정·실시계획인가 고시 : `22. 10.

- 농림부 농지협의 및 사전재해 협의중

◦ 사업 발주	: `22. 12.

그린뉴딜(중앙초)어린이통학로 지중화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교5가 ~ 동림교 앞(동림교)

◦ 사 업 량 : 전선 지중화 및 도로·인도정비 L=0.77㎞

◦ 사 업 비 : 3,505백만원 (국비 675 시비 2,830) / `22년예산: 1,680백만원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023 (3년)

□ 추진실적

◦ 지중화 사업 확정	: `20. 12. 22.

◦ 배전선로 지중화 협약체결(한국전력공사)	: `21. 04. 28.

◦ 국고보조금 교부 및 송금(산업통산자원부)	: `21. 09. 07.

◦ 실시설계용역 착수	: `21. 10. 18.

◦ 공기관대행사업비 지급(한국전력공사)	: `21. 11. 15.

◦ 공기관대행사업비 1차 지급(공가통신)	: `21. 12. 09.

◦ 공기관대행사업비 2차 지급(공가통신)	: `22. 01. 16.

◦ 실시설계 완료	: `22. 06. 16.

□ 금후계획

◦ 공사 착공	: `22. 10.

그린뉴딜(용성초) 어린이통학로 지중화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 서문4가 ~ (구)남원역 (충정로)

◦ 사 업 량 : 전선 지중화 및 도로·인도정비 L=0.66㎞

◦ 사 업 비 : 2,536백만원 (국비 316 시비 2,220) / `22년예산: 1,600백만원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년 (3년)

□ 추진실적

◦ 지중화 사업 확정	: `20. 12. 22.

◦ 배전선로 지중화 협약체결(한국전력공사)	: `21. 04. 28.

◦ 국고보조금 교부 및 송금(산업통산자원부)	: `21. 09. 07.

◦ 실시설계용역 착수	: `21. 10. 18.

◦ 공기관대행사업비 지급(한국전력공사)	: `21. 11. 15.

◦ 공기관대행사업비 1차 지급(공가통신)	: `21. 12. 09.

◦ 공기관대행사업비 2차 지급(공가통신)	: `22. 01. 16.

◦ 실시설계 완료	: `22. 06. 16.

□ 금후계획

◦ 공사 착공	: `22. 10.

그린뉴딜(도통초)어린이통학로 지중화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 큰들1길 3가 ~ 큰들2길 4가

◦ 사 업 량 : 전선 지중화 및 도로·인도정비 L=0.58㎞

◦ 사 업 비 : 2,584백만원 (국비 400, 시비 2,184) / `22년 예산: 1,284백만원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

□ 추진실적

◦ 지중화 사업 신청	: `21. 07. 14.

◦ `22년 국비 지원 가내시(산업통산자원부)	: `21. 10. 29.

◦ 지중화 협약 체결(한국전력공사)	: `22. 03. 16.

◦ 공기관대행사업비 지급(한국전력공사)	: `22. 06. 21.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역	: `22. 09. ~  `23. 02.

◦ 공사 착공	: `23. 03.

LX드론활용센터 지중화사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 중동리 114-4일원 (요천로)

◦ 사업내용 : 전선 지중화 및 도로 정비 L=0.43㎞

◦ 사 업 비 : 1,100백만원(시비 1,100) / `22년 예산: 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022 (2년)

□ 추진실적

◦ 지중화 사업 확정	: `21. 07. 01.

◦ 배전선로 지중화 협약체결(한국전력공사)	: `21. 09. 28.

◦ 공기관대행사업비 지급(한국전력공사)	: `21. 11. 21.

◦ 공기관대행사업비 2차 지급(공가통신)	: `22. 01. 13.

◦ 실시설계용역 완료	: `22. 04. 25.

◦ LX드론활용센터 기획연구 중(국토정보공사)       : `22. 08. ~ 11.

□ 금후계획

◦ 공사 착공	: `22. 11.

도시재생 예비사업

(신규사업)

□ 개    요

< 동문밖마을 지구 >

◦ 사 업 명 : 남원 동문밖 마을! 불어라 봄바람!

◦ 위    치 : 향교동 1통, 8통, 16통 일원(중앙초교 주변)

◦ 사업내용 : 정주환경 개선, 사업 기록화 및 홍보, 주민역량강화

◦ 총사업비 : 170,000천원(국 85,000, 도 17,000, 시 68,000)

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

< 금동 노후주거지 지구 >

◦ 사 업 명 : 렛츠고 도랑마을

◦ 위    치 : 천거3길 5-1일원(새집추어탕 주변)

◦ 사업내용 : 행랑채조성, 주민 운영주체 육성, 주민역량강화 교육

◦ 총사업비 : 180,000천원(국 65,000, 도 13,000, 시 102,000)

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

□ 추진실적

◦ 도시재생 예비사업 선정                          : `21. 12. 17.

◦ 금동 노후주거지 행랑채조성사업 추진             : `22. 02. ~ 09.

◦ 상반기 주민역량강화 사업

- 동문밖마을(5과목/수강60명/수료53명)                : `22. 05. ~ 08.

․ 일자리 창출형 꽃공예 공방교실, 마을디자인교실, 치유교실 등

- 금동노후주거지(6과목/수강100명/수료98명)           : `22. 05. ~ 09.

․ 주거안전교육, 집수리교육, 정원관리사 양성교육, 목공 교육 등

◦ 하반기 주민역량강화 사업

- 동문밖마을(3과목/수강60명)                         : `22. 08. ~ 10.

․ 일자리 창출형 꽃공예 공방교실, 마을디자인교실, 치유교실 등

- 금동노후주거지(4과목/수강70명)                     : `22. 07. ~ 11.

․ 집수리교육, 목공교육, 정관장 육성교육, 정관장 사업화지원

□ 금후계획

◦ 정주환경 개선                                    : `22. 09. ~ 11.

- 꽃 콘텐츠가 있는 정원 만들기(골목길 정비, 공원 조성 등)

◦ 예비사업 완료                                    : `22. 12.

도시재생사업 홍보 및 운영

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업지역 : 도시재생사업지 및 도시지역 일원

◦ 사업내용 : 도시재생 이야기길 제작, 홍보영상 및 홍보물품 제작, 역량강화 및 창업교육 등

◦ 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.

◦ 홍보대상

- 도시지역 읍면동(7개동, 운봉, 인월) 이․통장, 주민자치협의회, 부녀회

- 관내 고등학교(용성고, 제일고, 인월고) 및 학교 밖 청소년

◦ 홍보방법 : 이야기길 제작 배포 및 찾아가는 설명회 개최

◦ 사 업 비 : 45백만원 (시비)

- 이야기길 제작(15백만원), 홍보영상 및 PPT제작(15백만원), 홍보물품 제작(15백만원)

□ 추진실적

◦ 홍보물품 제작                                    : `22. 03. ~ 07.

◦ 도시재생 홍보계획 수립                           : `22. 06. 22.

◦ 도시재생 이야기길 디자인용역 완료                : `22. 07. 25.

◦ 도시재생 홍보영상 제작 완료                      : `22. 07. 25.

◦ 찾아가는 도시재생 설명회 개최                    : `22. 07. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 도시재생 이야기길 제작 및 배포                   : `22. 10.

- 남원역, 시외버스터미널, 광한루원 등 주요 관광 거점시설 등

◦ 도시재생사업 홍보 지속 추진(온라인)               : `22. 10. ~

도시재생 활성화계획 수립

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 사업내용 : 활성화계획 수립 2개소 및 공모대응

◦ 사업유형 : 동문밖마을(일반근린형), 금동 노후주거지(우리동네살리기)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

◦ 사 업 비 : 250백만원 /  `22년예산 : 150백만원

□ 추진실적

◦ 원가심사 및 일상감사                              : `22. 03. 02.

◦ 협상에 의한 계약 절차 이행                        : `22. 03. ~ 04.

◦ 동문밖마을 활성화계획 수립용역 착수               : `22. 04. 19.

- 용역사 : ㈜인우

◦ 금동노후주거지 활성화계획 수립용역 착수           : `22. 04. 25.

- 용역사 : 남원새로이마을관리사회적협동조합, ㈜도시공간디자인 에이치트리

◦ 주민의견 수렴                                     : `22. 07. ~ 09.

□ 금후계획

◦ 관련부서 의견 수렴 완료                           : `22. 10.

◦ 활성화계획(안) 수립                                : `22. 12.

◦ 주민공청회 및 의회 의견수렴 등 행정절차 이행      : `23. 01. ~ 03.

◦ 최종 활성화계획(안) 수립                           : `23. 05.

◦ 도시재생 뉴딜사업 공모 대응                       : `23. 05. ~ 12.

생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동ㆍ죽항동ㆍ금동 일원

◦ 총사업비 : 831백만원(국비 498, 도비 83, 시비 250)

◦ 사업내용

- 스마트가로등 설치 12개소

ㆍ사물감지 센서를 장착한 스마트가로등 설치

ㆍCCTV, 스마트 AED(심장제세동기), 공공 Wifi 서비스, 환경센서 설치

- 플랫폼 서비스

ㆍ운영시스템, 통합플랫폼 등을 통한 통합관제센터 연계

□ 추진실적

◦ 생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업 선정       : `21. 12. 30.

◦ 제1회 추가경정예산 확정                           : `22. 04. 06.

◦ 실시설계용역 착수                                 : `22. 04. 28.

◦ 죽항동 및 동충동 주민설명회 및 의견수렴 완료      : `22. 05. 17.

◦ 관련부서 의견 수렴                                : `22. 05. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 정보화사업 S/W과업 심의                     : `22. 10.

◦ 사업자 선정을 위한 협상에 의한 계약 절차 이행 : `22. 10. ~ 11.

◦ 스마트가로등 설치 및 시스템 구축사업 추진    : `22. 12. ~ `23. 02.

◦ 시범운영 및 시스템 안정화                    : `23. 03.

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 이음센터․숲정이마을 공유마당․상생협력상가 조성,

골목길개선사업(포켓주차장,마을쉼터 등), 역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년 (5년)

◦ 사 업 비 : 14,722백만원(균특 8,500, 도비 1,416, 시비 4,806)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2021	2022	2023이후	비 고
계	14,722	7,787	3,583	3,352	0
균 특	8,500	4,340	2,150	2,010	0
도 비	1,416	723	358	335	0
시 비	4,806	2,724	1,075	1,007	0

□ 추진실적

◦ 숲정이마을 공유마당 실시설계용역 착수           : `21. 12. 10.

◦ 남원 이음센터 조성사업 착공                     : `22. 03. 02.

◦ 주민역량강화사업

- 상반기 뉴딜아카데미(4과목/수강40명/수료34명)    : `22. 03. ~ 05.

- 하반기 뉴딜아카데미(5과목/수강63명)             : `22. 08. ~ 11.

- 상반기 주민공모사업 10팀                       : `22. 04. ~ 09.

◦ 활성화계획 변경용역 발주                        : `22. 09. 13.

□ 쟁점 및 대책

◦ 공유마당 조성사업 공공건축계획사전검토 및 에너지효율등급 인증 등 필수 절차 추가 및 자재비(철근, 단열재 등)를 포함한 물가상승으로 사업비 부족

□ 세부사업간 사업비 조정 및 단위사업 조정 등을 통한 활성화계획 변경

□ 금후계획

◦ 활성화계획 변경 승인 및 고시                 : `22. 12.

◦ 숲정이공유마당 조성사업 추진                 : `22. 12. ~ `23. 12.

◦ 이음센터 준공                                : `22. 12.

◦ 주민역량강화사업                             : ~ `23. 12.

□ 남원 도시재생 뉴딜사업(터미널지구) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비 고
골목길 경관개선	터미널 주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	바닥포장 완료 벽화, CCTV·가로등설치 마을쉼터 및 포켓주차장 조성	사업 완료
숲정이마을 공유마당	마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간 등 (연면적 2,199㎡,5층)	2,899	철거공사 완료 설계공모 완료 실시설계용역 추진	설계중 공정율:70%
남원이음센터	마을카페 교통회관 사회적생산품판매장 공영주차장 등 (연면적 : 1,914㎡,3층)	7,985	설계완료 공사 진행 중	공사추진중 공정율:40%
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성 (연면적 277㎡, 2층)	1,175	구조안전진단 (E등급, 구조불안정) 건축물 철거 완료 설계추진	계획변경 검토 중
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화 모니터링	850	주민공모사업 추진(10팀) 도시재생뉴딜아카데미운영 (상반기 4과목 34명수료)
도시재생 지원센터 운영	현장지원센터 운영 (센터장 및 팀원 인건비 등)	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	인건비 및 센터 운영비
합계		14,722

도시재생 인정사업(구.미도탕)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 22-1번지

◦ 사업면적 : 대지면적 886㎡ / 연면적 834㎡(지상4층)

◦ 사업내용 : 주민을 위한 문화·예술·상업·체험 복합 공간 조성

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3년)

◦ 사 업 비 : 4,389백만원 (국비 2,633, 도비 439, 시비 1,317)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2021	2022	2023이후	비 고
계	4,389	526	667	867	2,329
균 특	2,633	-	400	520	1,713
도 비	439	-	67	87	285
시 비	1,317	526	200	260	331

□ 추진실적

◦ 도시재생 인정사업 공모 선정                       : `20. 12. 21.

◦ 구.미도탕 문화저장소 리뉴얼 사업 실시설계용역 착수 : `21. 12. 14.

◦ 제3기 문화저장 도시재생대학 운영(4과목, 수료 30명) : `22. 01. ~ 03.

◦ 제4기 문화저장 도시재생대학 운영(3과목, 수료 39명) : `22. 06. ~ 08.

◦ 공용건축물 협의 요청(도시과→건축과)               : `22. 09. 15.

□ 금후계획

◦ 공용건축물 인허가 협의                       : `22. 09. ~ 11.

◦ 문화저장소 주민한마당 행사                   : `22. 10.

◦ 제5기 문화저장 도시재생대학 운영(3과목, 수강 45명)  : `22. 10. ~ 11.

◦ 문화저장소 리뉴얼 사업(H/W) 추진             : `22. 12. ~ `23. 12.

◦ 주민역량강화사업(S/W) 추진                    : ~ `23. 12.

- 문화저장 도시재생대학, 주민한마당 등

도시재생 지원센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2016년 ~ 도시재생사업 종료 시

◦ 운영예산 : 360백만원 (인건비, 일반운영비 등)

◦ 직원현황 : 총8명(현원7명) (기초지원센터장 부재, 현장지원센터장 3, 팀원 4)

◦ 담당업무 : 주민역량강화사업, 거버넌스(주민협의체 등) 운영관리, 사업홍보 등

□ 추진실적

◦ 상반기 도시재생대학 운영: 22과목 254명 수료

- 인정사업(7과목 69명), 터미널지구(4과목 34명), 금동지구(6과목 98명), 동문밖지구(5과목 53명)

◦ 주민공모사업 추진 : 21년/19팀, 22년/10팀

◦ 선진지견학 방문(타 지자체⟹남원시) : 1회(3명)

- 대구 북성로 도시재생현장지원센터 및 주민협의체 등

- 활동가 운영사항 및 개선사항 의견 교류, 숲정이현장센터 답사

◦ 터미널지구 22년 상반기 도시재생뉴딜아카데미 성과공유회 추진

◦ 주민 간담회 : 3개지구 주민협의체, 나우원 입주자 등(28회, 392명참석)

□ 금후계획

◦ 하반기 도시재생대학 운영(12과목, 수강193)         : ~ `22. 11.

- 인정사업(3과목 45명), 터미널지구(5과목 63명), 금동지구(4과목 70명), 동문밖지구(3과목 60명)

◦ 도시재생 예비지구(동문밖, 금동) 활성화 계획 수립 지원  :  ~ `22. 12.

◦ 도시재생사업 관련 계획 수립 및 변경 지원

◦ 도시재생 거버넌스 운영관리(주민간담회), 전담인력워크숍(월 1회) 지속 시행

◦ 도시재생 거점시설 운영 지원 - 사랑나눔어울림센터, 커먼스페이스, 청년창업공간

◦ 도시재생사업 홍보 및 운영

도시재생 거점시설 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2022. 01. ~

◦ 사 업 비 : 40백만원(운영 및 유지관리비)

◦ 거점시설

시 설 명	위 치	면적	비고
커먼스페이스	하정동 59-1번지(빨간벽돌)	대지 506㎡ 연면적 197.6㎡	준공(`20)
사랑나눔어울림센터	동충동 208-1번지 일원(구.북부시장)	대지 2,160㎡ 연면적 925㎡	준공(`22)
창업공간	하정동 56-1번지(한옥군)	대지 328㎡ 연면적 94.5㎡	준공(`21)
	하정동 53-1번지(구.부채박물관)	대지 212㎡ 연면적 241.7㎡	준공(`21)

□ 추진실적

◦ 커먼스페이스 및 청년창업공간 입주 및 운영     : `22. 01.

입주공간	상호(대표)	사업아이템	비고
창업공간	고샅(오종하)	카페(제철특산물 활용)	한옥군
	추냔이네(김민화)	남원 굿즈 편집샵
	(주)도킹씨네마떼끄(김형준)	영화 및 문화 체험공간조성	구.부채박물관
커먼스페이스	Red Bricks Studio(최한범)	음악과 영상기반 콘텐츠 제작 및 교육	빨간벽돌

◦ 사랑나눔어울림센터 조성사업 준공              : `22. 02. 14.

◦ 제1회 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최         : `22. 04. 22. ~ 23.

◦ 제2회 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최         : `22. 07. 01. ~ 02.

※ NOWWON[(주)도킹씨네마떼끄 외 3팀] 자체 행사 추진

◦ 제7회 도시재창조한마당 우수사례 경진대회(우수상) : `22. 09. 02.

□ 금후계획

◦ 제3회 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최            : `22. 10.

◦ 사랑나눔어울림센터 무상 사용수익 신청 및 허가    : `22. 10.

- 무상 사용수익 허가 대상 : 남원새로이마을관리사회적협동조합

◦ 도시재생 거점시설 활성화방안 강구 연구용역 추진  : `22. 10. ~

금암공원 조성

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 사업내용 : 야간경관이 특화된 가족생태 근린공원조성

-［1단계］주민생활과 밀접한 근린생활시설 / ‘20~‘22년

- 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물복원, 주차장 등

-［2단계］공원 이용활성화를 위한 관광객 유인시설 / ‘22~‘23년

- 프로포즈존, 조경식재, 경관조명, 까페전망대 등

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년 (6년)

◦ 총사업비 : 115억원(부지매입 10, 용역비 3, 공원조성 102)

□ 추진실적

◦ 금암공원 조성사업 추진계획 수립	: `19. 12. 05.

◦ 1단계 금암공원 조성사업 완료	: `20. 04. ~ `22. 06.

- 1단계 사업비 : 7,000백만원(전기 719, 조경 6,261, 기타 20)

·전기분야 : 금수정 및 수목 경관조명, 인도교조명, 가로등설치 등

·조경분야 : 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 쉼터, 화장실 등

◦ 2단계 금암공원 조성사업 실시설계용역중	: `21. 12. ~ `22. 09.

- 용역사 : (유)제이케이건설기술 / 용역비 57백만원

◦ 2단계 까페전망대 건축공사 착공           : ‘22. 04. ~‘22. 09.(중지중)

- 시공사 : (유)선영건설 / 공사비 260백만원(전기·통신 포함)

□ 금후계획

◦ 금암공원 조성사업 사업(2단계) 시행        : `22. 10. ~ `23. 12.

- 경관조명, 포토존, 조경식재·시설물 등

도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소 (금암, 월락, 향교, 왕정, 신촌, 노암)

◦ 면    적 : 2,176천㎡ (사유지 1,292천㎡, 국・공유지 884천㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년 (8년)

◦ 사 업 비 : 16,000백만원 (시비) / `22년 예산 : 1,500백만원

□ 추진실적

(단위: 백만원)

구 분	지정면적(㎡)	소유별(㎡)		매입현황(㎡)			비 고
		국공유지(필지)	사유지(필지)	기매입(필지)	22년(필지)	금액
계	2,175,744	883,610(261)	1,292,134(601)	462,359(118)	43,694(19)	1,500	매입률 39%
향교공원	483,977	217,932(68)	266,045(134)	59,920(37)	28,074(8)	722
왕정공원	1,405,206	576,039(149)	829,167(378)	361,142(55)	12,704(8)	702
월락공원	64,054	3,496(17)	60,558(22)	8,098(4)
노암공원	112,600	12,487(14)	100,113(35)	9,607(2)	2,380(1)	46
금암공원	40,000	19,988(7)	20,012(24)	16,198(19)	536(2)	30
신촌공원	69,907	53,668(6)	16,239(8)	7,394(1)

◦ ’22년 사유지 매입실적 : 향교공원 외 3개소(19필지/43,694㎡) ※ 집행완료

□ 금후계획

◦ 도시공원 사유지 매입 추진(감정평가, 보상협의)  : ‘22. 07. ~ ‘25. 06.

- 사업연계성 및 활용도가 높은 부지 우선 매입(향교·왕정·신촌공원)

어린이공원 새단장

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 어린이공원 새단장(바닥정비, 퍼걸러, 수목정비, 화장실 보수 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년)

◦ 사 업 비 : 1,600백만원 / `22년 예산 : 100백만원

□ 추진실적

◦ ‘18 ~ ‘22년 새단장사업 현황

조성 년도	공원명	위치	사업비 (백만원)	사업내용
‘18년	도통3호 어린이공원	용성중 옆	100	탄성포장 400㎡, 수목식재, 점토블록포장 140㎡ 등
	도통7호 어린이공원	도통동주민센터 옆	100	탄성포장 410㎡, 콩자갈포장 112㎡ 등
	도통6호 어린이공원	물방개 워터파크	700	탄성포장 939㎡, 종합놀이대(2종), 조형분수(9종)
‘19년	향교4호 어린이공원	중앙초 옆	20	야자매트 61㎡, 수목식재 등
	도통1호 어린이공원	시청북문	90	탄성포장 384㎡, 수목식재 등
	도통2호 어린이공원	녹주맥반석 옆	90	탄성포장 455㎡, 수목식재 등
‘20년	향교1호 어린이공원	덕인회관 옆	60	탄성포장 262㎡, 수목식재 등
	도통5호 어린이공원	예닮교회 앞	140	탄성포장 186㎡, 수목식재, 데크설치 29㎡
‘21년	노암1호 어린이공원	노암5통	60	옥외용벤치 교체, 수목식재 등
	도통4호 어린이공원	도통초 옆	140	탄성포장 331㎡, 수목식재, 화장실신축 등
‘22년	주천 송치, 이백 서곡 어린이공원 등	문화마을내	100	그네 1대, 철봉 1대, 편의시설 보수 벤치 교체, 수목 식재, 비가림시설 등

◦ 물방개 워터파크 정상 운영(이용객 6,352명)      :‘22. 07. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 어린이공원 시설물, 수목 연중 관리              :‘22. 10. ~ 12.

만인공원 광장 및 교차로 개선사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원

◦ 사업내용 : 광장조성 및 교차로 개선사업

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년 (5년)

◦ 사 업 비 : 4,600백만원(용역비 205, 부지매입 2,000, 공사비 2,395)

- `22년 예산 : 500백만원(보상비)

□ 추진실적

◦「만인공원」광장 교차로 개선 디자인 공모     : ‘19. 12. ~ ‘20. 02.

◦「만인공원」광장 및 교차로 개선 설계공모    : ‘20. 04. ~ 08.

◦ 기본 및 실시설계용역 PQ 추진                : ‘20. 09. ~ 11.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진(주민설명회, 문화재자문 등) : ‘20. 12. ~ ‘21. 12.

- 용역사 : ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 + ㈜인우

※ 길문화관 추진기관(전라북도) 설계반영 건의

◦ 기본설계(안) 주민설명회, 문화재자문          : ‘20. 12. ~ ‘21. 12.

◦ 경관심의, 공공공지 도시계획 심의·고시       : ‘22. 01. ~ 04.

◦  문화재현상변경 신청 , 심의(불허)              : ‘22. 03. ~ 05.

◦  문화재현상변경 조건부 허가                  : ‘22. 07.

- 허가조건 : 관계전문가와 협의 후 시행

□ 금후계획

◦ 만인공원 마스터플랜 수립 후 전문가 의견반영 시행을 위한 사업시기 조정

왕정공원 산림욕장 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산37번지 일원

◦ 면    적 : 30,000㎡

◦ 조성내용 : 전망대, 야외쉼터, 데크산책로, 숲속교실, 어린이 놀이터 등

◦ 조성기간 : 2020 ~ 2022년 (2년)    * 준공 : 2022. 4월

◦ 조 성 비 : 1,200백만원(국비 600, 시비 600)

◦ 시설물 현황

- 편익시설     : 퍼걸러 2개, 벤치 22개, 데크로드 430m, 데크계단 97m

- 위생시설     : 이동식화장실 1개, 세면대 1개, 먼지털이기 1개, 중형관정 1개

- 체험교육시설 : 종합안내판 1개, 야자매트 153m, 스타패스 30m

- 체육시설     : 사면놀이대(미끄럼틀 3개, 외줄오르기 1식, 암벽손잡이 1식),        짚라인놀이대 1개, 물놀이장(워터드롭 4개, 수조 2개)

- 전기·통신시설 : 가로등 4개, 경관등 3개, CCTV 4개

□ 추진실적

◦ 물놀이시설 운영 및 수목·시설물 유지관리       :  ‘22. 07. ~ 08.

- ‘22년 물놀이시설 시범운영 / 이용객 현황 : 1,237명

□ 금후계획

◦ 왕정공원 산림욕장 이관 (도시과 ⇒ 관광시설사업소)   :  ‘22.  10.

쾌적한 도시공원 유지관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대상공원 : 왕정공원 외 22개소

◦ 사업내용

- 등산로변 예초(왕정, 신촌, 향교공원 / 13㎞)      :  30백만원

- 등산로 정비(신촌공원 외 3지구)                 :  50백만원

- 보안등 설치(어린이공원 / 6개소)                :  18백만원

- 수목보식(김주열열사공원, 산림욕장)               :  20백만원

- 시설물 및 수목유지관리(근린·어린이공원 / 23개소)  : 110백만원

- 맨발 황토길 조성(도통근린공원)                  :  35백만원

◦ 사업기간 : 2022. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 263백만원

□ 추진실적

◦ 김주열열사공원, 산림욕장 조경수 보완 / 영산홍외 4종 4,414주 등 :‘22. 03. ~ 04.

◦ 공원 시설물도색·교체, 수목해충방제                 :‘22. 03. ~ 06.

◦ 맨발 황토길 조성(도통근린공원)	:‘22. 04. ~ 06.

◦ 근린공원, 어린이공원 수목관리(제초, 풀베기, 수목전정)     :‘22. 04. ~ 09.

◦ 어린이공원내 블랙박스 보안등 설치 / 6개소, 11개      :‘22. 05. ~ 06.

◦ 등산로 예초작업(왕정, 향교공원, 신촌공원) / 13㎞     :‘22. 05. ~ 09.

□ 금후계획

◦ 공원내 수목, 녹지대, 시설물 유지관리               :‘22. 10. ~ 12.

왕정공원 숲속야영장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산13번지 일원

◦ 면    적 : 28,069㎡

◦ 사업내용 : 일반야영장 29면, 글램핑돔 3동, 산책데크, 부대시설, CCTV 등

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2022년 (2년)

◦ 사 업 비 : 2,400백만원(국비 1,200, 시비 1,200) / `22년 예산 : 2,100백만원

□ 추진실적

◦ 숲속야영장 기본계획 및 실시설계용역                   :‘21. 01. ~‘21. 09.

◦ 캠핑동호회 의견수렴(한국캠핑협회 외 2개 동호회)        :‘21. 05.

◦ 숲속야영장 제반용역 및 관련부서 협의                  :‘21. 05. ~‘22. 03.

◦ 숲속야영장 조성계획 승인, 고시(전라북도)                :‘22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업 조성사업(조경·토목) 착공          :‘22. 05.

- 공사비 : 18억(도급 9, 관급 9) / 공사업체 : 남원산림조합

◦ 숲속야영장 조성사업 조성사업(전기·통신) 착공          :‘22. 10.

□ 금후계획

◦ 토공(우수·오수·상수도공), 전기·통신(배관공) 연내 완료