2023. 1.

2023년 주요업무 계획

도  시  과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2022년 주요업무 결산

□ 2023년 중점 추진방향

□ 2023년 주요업무 계획

◦ 2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 2023년 도시가로망 정비사업(총괄)

◦ 천왕봉로 대로 개설공사

◦ 광한루원 정문 앞 도로환경 개선사업 타당성 조사 및 기본계획용역

◦ 교룡 중·소로 개설공사

◦ 식정 관광 우회도로 개설공사

◦ 신촌 소로 개설공사

◦ 국민연금공단 옆 소로 개설공사

◦ 불무터길 소로 정비공사

◦ 쑥골길 소로 개설공사

◦ 그린뉴딜(보조)·지중화사업(보조)

◦ 도시재생 지원센터 운영

◦ 도시재생 거점시설 운영

◦ 터미널지구 도시재생 뉴딜사업

◦ 도시재생 인정사업(구.미도탕)

◦ 도시재생 활성화계획 수립

◦ 생활밀착형 도시재생 기술지원사업

◦ 도시공원 내 사유지 매입

◦ 어린이공원 새단장

◦ 금암공원 조성사업

◦ 만인공원 조성사업

◦ 왕정공원 숲속야영장 조성사업

◦ 쾌적한 도시공원 유지관리

일  반  현  황

□ 기    구

							도 시 과 장
							백 강 규
도시계획담당				도시정비담당							도시재생담당				공원담당
성 월 계				노 경 록							강 자 청				김 인 규
∘도시기본,관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정 및 인가 ∘지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리				∘도시가로망 정비계획 수립 ∘도시가로망사업 시행(대로,중로,소로) ∘지역개발사업 ∘전선 지중화 사업 ∘장기미집행시설 (도로)해소							∘도시재생뉴딜사업 ∘도시재생인정사업 ∘도시재생 전략 계획수립 ∘도시재생 활성화 계획 수립 ∘도시재생예비사업 ∘도시재생지원센터 운영				∘공원 녹지 기본 계 획(변경) 수립 ∘공원 조성 사업 추진 ∘물방개워터파크 운영 ∘왕정공원 산림욕장 및 숲속야영장 조성

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	20	1	4	7	5	3
현 원	20	1	7	4	-	8	공무직 3 휴직자 2
증 감	-	-	3	△3	△5	5

□ 도시관리계획

(2022. 12월 기준)                                                    (단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	30.65 (4.1)	276.39 (36.7)	337.78 (44.9)	107.99 (14.3)

□ 도시지역(용도지역별)

(2022. 12월 기준)                                                    (단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일 반	준주거	일 반 상 업	유 통 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	30.647 (100%)	0.828 (2.70)	5.586 (18.23)	0.021 (0.07)	0.959 (3.13)	0.020 (0.07)	1.835 (5.99)	20.420 (66.63)	0.978 (3.19)
남 원	25.358 (100%)	0.828 (3.27)	4.516 (17.81)	0.016 (0.06)	0.794 (3.13)	0.020 (0.08)	1.059 (4.18)	18.125 (71.48)	-
운 봉	1.785 (100%)	-	0.543 (30.42)	-	0.096 (5.38)	-	-	0.656 (36.75)	0.490 (27.45)
인 월	2.727 (100%)	-	0.527 (19.33)	0.005 (0.15)	0.069 (2.53)	-	-	1.639 (60.10)	0.488 (17.90)
남원 일반산단	0.777 (100%)	-	-	-	-	-	0.777 (100%)	-	-

※ 제1종일반주거지역, 녹지지역의 경우 건축물 층수 4층 이하

□ 도시지역내 도시계획 도로

(2022. 12월 기준)                                                   (단위 : 천㎡)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설률 (%)
	노선수	면적	노선수	면적	노선수	면적
계	712	9,095	578	8,887	134	208	97.7
대 로	33	2,263	27	2,148	6	115	94.9
중 로	136	3,652	110	3,632	26	20	99.5
소 로	543	3,180	459	3,107	84	73	97.7

□ 건설업체 현황

(2022. 12월 기준)

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		종합건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
418	690	335	594	266	525	69	69	83	96

2022년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 도시관리계획 변경 및 지속발전 가능한 도시개발사업 추진 ◦ 도시가로망 개설 및 인도 정비로 주민 편의 증대와 안전사고 예방 ◦ 소규모 지역축제, 주민역량강화사업 등 주민참여를 통한 도시활성화 도모 ◦ 도시공원 조성 및 정비로 주민 편의 증대 및 휴식공간 제공

□ 2023 국가(공모) 예산 확보 : 3개사업 / 33.62억원(국 30.77 도 2.85)

◦ 그린뉴딜(운봉초·중) 어린이통학로 지중화   : 5.28억원(국)

◦ 지역개발사업(식정 우회도로)                : 8.36억원(국)

◦ 도시재생인정사업(구.미도탕)                 : 19.98억(국 17.13 도 2.85)

□ 보존과 개발이 조화를 이루는 도시기본계획, 도시관리계획  수립․정비 및 개발행위허가 추진

◦2040 남원 도시기본계획(안) 수립 및 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 추진으로 체계적 도시 공간구조 마련

- 계획지표 : 전라북도 인구정책 및 지방도시의 경쟁력 확보를 위한 체류인구 지표 도입

◦남원시 도시계획조례 정비(개정)으로 무분별한 개발에 따른 자연경관의 훼손 등을 방지하고 체계적인 개발행위 유도

- 폐차장 이격거리 신설

◦건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 개발행위 허가 추진

- 도시계획위원회 심의 전체분과 5회 / 1분과 22회 / 2분과 2회 / 3분과 1회

- 개발행위허가 및 협의 : 개발행위 2,001건, 일반협의 3,508건

- 개발행위허가 민원 감소

구 분(접수건수)	2021년	2022년	증감
국민신문고	169건	152건	감17건
정보공개	60건	34건	감26건

□ 도시기반시설 확충으로 지역접근성 개선 및 시민편의 도모

◦ 계속사업 7지구 완료 L=7.4km / 4,870백만원

◦ 대로 1지구 L=2.0km,  500백만원

- 지리산IC 진입도로(비도시구간) 1개소

◦ 중로 3지구 L=2.1km, 2,500백만원

- 만인로, 금암길, 가방뜰길 3개소

◦ 소로 3지구 L=3.3km, 1,870백만원

- 호치길, 인월 서무1길, 서문3길 3개소

□ 주민참여를 통한 도시활성화 도모

◦ 청년창업공간을 운영중인 청년단체(나우원)에서 지역주민과 함께하는 페스티벌 3회 개최

- 제7회 도시재생 한마당에서 경제활력우수사례분야 우수상 수상

◦ 주민이 참여하는 도시재생대학, 주민공모사업 및 주민한마당 행사 추진

- 도시재생대학(10회), 주민공모사업(10팀), 주민한마당(3회)

□ 왕정공원 활성화 사업 추진(산림욕장 1개소, 숲속야영장 1개소)

◦ 산곡동 교룡산관광지내 산림욕장 개장 / ‘22. 5월

- 시민의 건강·휴양장소로 큰 인기 / 물놀이장, 산책로, 숲속쉼터 등

◦ 산곡동 숲속야영장 활발히 추진 / 산림청(균특 9, 도비 3, 시비 12)

- ‘23년 개장, 도심권에서 즐기는 캠핑(29면, 글램핑돔 3동, 부대시설 등)

	아쉬운 점
◦ 2040도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 승인 지연 ◦ 식정 관광 우회도로 개설공사 착공 지연 - 지역개발사업의 추진을 위한 중앙부처 협의 기간 장기화 ◦ 도시재생 기초지원센터장 부재에 따른 센터 활동 제약 -`23년 업무추진이 가능하도록 조속한 시일 내 기초지원센터장 채용 추진 ◦ 어린이공원별 차별화 되지 않고 일률적인 사업내용 반영 ◦ 사업추진시 어린이 눈높이 맞게 의견수렴 절차를 이행하여 만족도 높고 다시찾고 싶은 어린이공원 조성

2023년 중점 추진방향

남원의 색깔을 도시에 풀어 내어

행복하고 지속가능한 도시 조성

	중 점 추 진 과 제
◦ N-도시디자인 수립 - 개별구상 계획(안)을 통합실행 계획수립 - 전문가 및 시민공청회를 통해 남원만의 색깔 찾기 ◦ 지속발전 가능한 도시관리계획 수립 - 체계적 도시관리를 위한 도시기본계획 및 도시관리계획 수립(재정비) - 편리하고 체계적인 도시공간 구조 기틀 마련 ◦ 시민생활 안전 중심의 도시가로망 확충정비 - 시민편의 중심의 도시가로망 확충 정비 - 안전한 보행안전 조성으로 삶의 질 향상 도모 ◦ 도시활성화를 위한 지속가능한 도시재생사업 추진 - 도시 활성화를 위한 도시재생 신규사업 발굴 - 주민과 함께하는 도시재생기반 구축 ◦ 시민의 도심 속 휴식처 및 랜드마크가 되는 도시공원 조성 - 장기미집행 도시공원 사유지 매입, 숲속야영장 개장 목표 - 사계절 찾고 싶은 금암공원, 역사와 테마의 만인공원 조성

2023년 주요업무 계획

2040 남원 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업 범위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사업 기간 : 2019 ~ 2023년

◦ 사업 내용 : 도시기본계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 사 업 비 : 총 1,444백만원

□ 추진실적

< 도시기본계획 수립>

◦ 기초조사 및 현황분석 (시민참여단운영 4회)   : `19. 07. ~ `19. 12.

◦ 도시기본계획 입안보고	: `20. 08. 20.

◦ 주민의견 수렴(공청회) 개최	: `21. 03. 18.

◦ 시의회 의견청취	: `21. 03. ~ 04.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문	: `21. 08. 10.

◦ 국토계획평가(국토교통부) 협의 추진중	: `21. 06. ~ 12.

◦ 도시기본계획 승인신청(남원시 → 전라북도)	: `22. 10. 20.

◦ 관련부서협의 추진중	: `22. 10. ~ 12.

< 도시관리계획 수립>

◦ 기초자료 및 관련자료 수급, KLIS 등재사항 검토 및 정비 등

◦ 장기미집행시설 전수 조사 및 관련도서 작성	: ‘19. 08. ~ 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(1차/2차)	: ‘20. 07. / 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(3차)	: ‘22. 02.

◦ 도시관리계획(재정비) 입안, 의견청취, 의회의견청취	: ‘22. 03. ~ 04.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문 및 심의	: ‘22. 05. 23.

◦ 전라북도 관련부서, 산림청, 환경청 협의 추진중  : ‘22. 06. ~ 12.

□ 금후계획

<도시기본계획 수립>

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘23. 02.

<도시관리계획(재정비)>

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의 및 승인	: ‘23. 03.

도시기본계획

◇ 미 래 상 : 남원에 머무는 모두가 시민이 되는 오고싶고 살고싶은 “문화관광도시 남원”

◇ 계획인구 지표 설정

구분		2020	2025	2030	2035	2040	비고
			1단계	2단계	3단계	4단계
통계청 인구추계	남원시	77,539	75,871	74,790	74,162	73,924
	105% 적용시	현황 78,165	79,665	78,530	77,870	77,620
상주 인구(계획인구)		82,045	79,916	79,083	78,443	77,857
주간 활동 인구(체류인구)		15,236	16,184	17,145	18,084	18,994
인구지표(안) (총괄)	총계	97,281	96,100	96,228	96,528	96,851
	최종적용	97,000	96,000	96,000	97,000	97,000

※ 인구의 지속적 감소 및 유출에 대응하기 위해 관광체류형 인구 지표 수립 반영

	도시관리계획(재정비)
◇ 시간적 범위(기준년도 / 목표연도) : 2020년 / 2030년 ◇ 공간적 범위 : 남원시 행정구역 일원(752.81㎢) ◇ 내용적 범위 : 용도지역, 용도지구, 지구단위계획, 성장관리계획, 도시계획시설 결정(변경) - 전라북도 결정사항 : 78건 / 용도지역(68지역), 용도지구(10지구)

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위  치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시행자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 384억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	67,336㎡	11,111㎡	5,860㎡	19,081㎡	도로,공원, 녹지,저류지 등
수용인구·세대수		2,807인 / 1,080세대

□ 추진실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: `17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식) : `18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: `18.12.31. ~ `19.05.30.

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도) : `20. 08. 14.

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 08. 21.

◦ 토지이용계획 변경(2차) 추진 및 승인	: `21. 02. ~ 10.

◦ 문화재 정밀발굴조사 추진(중층발굴, 4구역 추가발굴) : `21. 07. ~ `23. 06.

◦ 실시계획 변경 인가 고시(1차)	: `22. 02. 25.

◦ 문화재 보존방안 수립 완료(1·2구역) / 문화재청 : `22. 09. 21.

◦ 문화재 유적 전문가 검토 조치(3구역) / 문화재청 : `22. 12. 07.

□ 금후계획

◦ 문화재 보존방안 심의 및 추가발굴조사 완료	: `22. 09. ~ `23. 06.

◦ 개발 및 실시계획 변경인가	: `23. 01. ~ `23. 06.

◦ 공사추진(LH)	: `23. 07. ~ `26. 12.

2023년 도시가로망 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시계획 도로개설 14지구, L=8.4㎞

◦ 총사업비 : 63,734백만원 (23년 예산 : 14,787백만원)

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2025년 (7개년)

◦ 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	기투자	2023년	2023이후	비고
계	14지구 (L=8.4km)	63,734	24,317	14,787	24,630
대 로	1지구 (L=0.4km)	2,500	550	1,000	950
중 로	1지구 (L=0.4km)	4,600	960	1,500	2,140
소 로	5지구 (L=3.6km)	14,450	4,609	3,552	6,289
지중화 등	7지구 (L=4.0km)	42,184	18,198	8,735	15,251

□ 추진실적

◦ 2022년 도시가로망 정비 : 7지구, L=7,454m

: 대로 1지구(L=2,000m), 중로 3지구 (L=2,110m), 소로 3지구(L=3,344m),

구 분	사 업명	위 치	사 업 량(m)	총사업비	‘20년 까지	‘21년	‘22년	사업기간
계		7지구	L=7,454m	33,800	20,680	8,250	4,870
대로	소계	1지구	L=2,000m	12,500	10,400	1,600	500
	지리산 IC진입도로 〔도시··비도시구간〕	아영 인월	L=2,000m,B=25m	12,500	10,400	1,600	500	‘17~’22
중로	소계	3지구	L=2,110m	13,300	6,830	3,970	2,500
	금암길	노암	L=750m, B=15m	7,000	3,800	1,800	1,400	‘18~’22
	만인로	용정	L=1,100m, B=13.5m	4,200	2,400	1,000	800	‘18~’22
	가방뜰길	금동	L=260m, B=20m	2,100	630	1,170	300	‘20~’22
소로	소계	3지구	L=3,344m	8,000	3,450	2,680	1,870
	호치길	광치	L=2,800m, B=10m	5,000	3,000	1,000	1,000	‘18~’22
	서문3길	왕정	L=142m, B=6m	1,500	130	1,000	370	‘20~’22
	서무1길	인월	L=402m, B=8m	1,500	320	680	500	‘20~’22

□ 금후계획

◦ 2023년 도시가로망 정비 : 14지구, L=8,386m (8.4km)

: 대로 1지구(L=386m), 중로 1지구(L=410m), 소로 5지구(L=3,585m),

지중화 및 보상 기타 7지구(L=4,005m)

- 발주예정 (7지구) : 천왕봉로, 식정관광우회도로, 국민연금공단 옆 소로, 불무터길 소로, 쑥골길 소로, 그린뉴딜(도통초), 노인복지 지중화

- 실시설계 (2지구) : 그린뉴딜(운봉초·중), 교룡중·소로

- 공 사 중 (4지구) : 그린뉴딜(중앙초, 용성초), 신촌소로, 중소도로 유지관리 사업

- 보 상 중 (1지구) : 장기미집행(도로)보상

구 분	사 업 명	위치	사업량(m)	총사업비	‘21년 까지	‘22년	‘23년	‘23년이후	‘23년 추진계획	비고 (사업기간)
계		14지구	L=8,386	63,734 (6,532)	8,889 (2,239)	15,428 (1,150)	14,787 (1,364)	24,630 (1,779)		`19~`25
대로	소계	1지구	L=386	2,500	150	400	1,000	950
	천왕봉로 대로	인월	L=386m B=25m	2,500	150	400	1,000	950	토지보상 공사발주	‘20~’24
중로	소계	1지구	L=410	4,600	-	960	1,500	2,140
	교룡중·소로	용정	L=410m B=15m	4,600	-	960	1,500	2,140	토지보상 (장기미집행)	‘23~’25
소로	소계	5지구	L=3,585	14,450 (4,613)	1,559 (1,248)	3,050 (750)	3,552 (836)	6,289 (1,779)
	식정관광 우회도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000 (4,613)	1,539 (1,248)	2,500 (750)	1,672 (836)	6,289 (1,779)	토지보상 공사발주	‘19~’25
	신촌소로	신촌	L=305m B=6m	900	20	300	580	-	토지보상 공사완료	‘20~’23
	국민연금공단 옆 소로	동충	L=110m B=6m	300	-	-	300	-	공사완료	‘23~`24
	불무터길 소로	노암	L=100m B=5m	500	-	-	500	-	공사추진	‘23
	쑥골길 소로	왕정	L=110m B=8m	750	-	250	500	-	공사추진	‘22~`23
그린 뉴딜 지중화	소계	5지구	L=3,305	19,308 (1,919)	3,780 (991)	7,838 (400)	4,935 (528)	2,755
	그린뉴딜(중앙초)지중화사업	향교5가 동림교	전선지중화 L=770m	5,480 (675)	2,550 (675)	2,130	800		공사완료	‘21~’23
	그린뉴딜(용성초) 지중화사업	서문4가 구)남원역	전선지중화 L=660m	3,690 (316)	1,230 (316)	1,780	680		공사완료	‘21~’23
	그린뉴딜(도통초) 지중화사업	도통640~637	전선지중화 L=575m	3,368 (400)	-	2,368 (400)	1,000		공사완료	‘22~’23
	그린뉴딜(운봉초·중) 지중화사업	운봉읍 동천리 ~서천리	전선지중화 L=1,100m	4,150 (528)	-	-	1,395 (528)	2,755	공사추진	‘23~`24
	고죽(노인복지) 지중화사업	고죽	전선지중화 L=200m	2,620	-	1,560	1,060		공사추진	‘22~’24
보상 기타	소계	2지구	L=700	22,876	3,400	3,180	3,800	12,496
	장기미집행 (도로)보상	관내	48개 노선	20,676	2,800	2,380	3,000	12,496	토지보상	‘20~’25
	중소도로 유지관리사업	관내	L=700m	2,200	600	800	800		공사추진	‘23. 1~12. (연례반복)

▣ 2023년 도시가로망 정비사업 총괄표

(단위:백만원)

구 분	사 업 명	위치	사업량(m)	총사업비	‘21년 까지	‘22년	‘23년	‘23년이후	‘23년 추진계획	비고 (사업기간)
계		17지구	L=12,786	112,234 (6,532)	8,889 (2,239)	15,428 (1,150)	14,787 (1,364)	73,130 (1,779)		`17~`29
대로	소계	2지구	L=2,786	40,100	150	400	1,000	38,550
	천왕봉로 대로	인월	L=386m B=25m	2,500	150	400	1,000	950	토지보상 공사발주	‘20~’24
	신정~조산 연결 대로	신정~송동	L=2,400m B=25m	37,600				37,600	토지보상 (장기미집행)	‘23~’29
중로	소계	3지구	L=2,410	15,500	-	960	1,500	13,040
	산책길 중로	조산	L=1,400m B=20m	5,400				5,400	토지보상 (장기미집행)	‘23~’26
	교룡중·소로	용정	L=410m B=15m	4,600	-	960	1,500	2,140	토지보상 (장기미집행)	‘23~’25
	광천남길 중로	향교	L=600m B=20m	5,500				5,500	구암지구개발후보상	‘24~’27
소로	소계	5지구	L=3,585	14,450 (4,613)	1,559 (1,248)	3,050 (750)	3,552 (836)	6,289 (1,779)
	식정관광 우회도로	식정	L=2,960m B=10m	12,000 (4,613)	1,539 (1,248)	2,500 (750)	1,672 (836)	6,289 (1,779)	토지보상 공사발주	‘19~’25
	신촌소로	신촌	L=305m B=6m	900	20	300	580	-	토지보상 공사완료	‘20~’23
	국민연금공단 옆 소로	동충	L=110m B=6m	300	-	-	300	-	공사완료	‘23~`24
	불무터길 소로	노암	L=100m B=5m	500	-	-	500	-	공사추진	‘23
	쑥골길 소로	왕정	L=110m B=8m	750	-	250	500	-	공사추진	‘22~`23
그린 뉴딜 지중화	소계	5지구	L=3,305	19,308 (1,919)	3,780 (991)	7,838 (400)	4,935 (528)	2,755
	그린뉴딜(중앙초)지중화사업	향교5가 동림교	전선지중화 L=770m	5,480 (675)	2,550 (675)	2,130	800		공사완료	‘21~’23
	그린뉴딜(용성초) 지중화사업	서문4가 구)남원역	전선지중화 L=660m	3,690 (316)	1,230 (316)	1,780	680		공사완료	‘21~’23
	그린뉴딜(도통초) 지중화사업	도통640~637	전선지중화 L=575m	3,368 (400)	-	2,368 (400)	1,000		공사완료	‘22~’23
	그린뉴딜(운봉초·중) 지중화사업	운봉읍 동천리 ~서천리	전선지중화 L=1,100m	4,150 (528)	-	-	1,395 (528)	2,755	공사추진	‘23~`24
	고죽(노인복지) 지중화사업	고죽	전선지중화 L=200m	2,620	-	1,560	1,060		공사추진	‘22~’24
보상 기타	소계	2지구	L=700	22,876	3,400	3,180	3,800	12,496
	장기미집행 (도로)보상	관내	48개 노선	20,676	2,800	2,380	3,000	12,496	토지보상	‘20~’25
	중소도로 유지관리사업	관내	L=700m	2,200	600	800	800		공사추진	‘23. 1~12. (연례반복)

천왕봉로 대로 개설공사

(계속사업)

농협4가

풍천교

도로확‧포장

L=386m,B=25m

□ 개    요

◦ 위    치 : 인월면 인월리 농협 사거리~ 풍천교

◦ 사 업 량 : 도로정비 L=386m, B=25m

◦ 사 업 비 : 2,500백만원 (공사비1,700 보상비800) / 23년예산 : 1,000백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2024년 (5년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 시행(주민설명회 6.10)	: `20. 02. 24. ~ 06. 22.

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 06. 22.

◦ 분할측량 및 보상계획 공고	: `21. 06. 10.

◦ 편입토지·지장물 보상금 산정 및 협의	: `22. 06. ~

□ 금후계획

◦ 편입토지·지장물 손실보상 협의 지속 추진   : `22. 12.

◦ 공사 착공	: `23. 03.

광한루원 정문 앞 도로환경 개선사업 타당성 조사 및 기본계획용역

(신규사업)

대상구간

L = 650m

승사교

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 광한루원 일원

◦ 사업내용 : 타당성조사 및 기본계획용역 1식(L=650m)

◦ 사 업 비 : 200백만원 (용역비 200) / `23년예산 : 200백만원

◦ 사업기간 : 2023 01. ~ 06. (6개월)

□ 추진계획

◦ `23년 본예산 편성	: `22. 12.

◦ 타당성 용역조사 및 기본계획 용역 추진	: `23. 01.

□ 기대효과

◦ 광한루원 정문 앞 도로(요천로)를 상시 관광이 가능한 특화된 공간 자원화로 시민 휴식공간 확보 및 지역경제 활성화 도모

교룡 중·소로 개설공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 향교동(교룡초) ~ 향교동(영락교회)

◦ 사업내용 : 도로개설 L=410m, B=7~15m, 인도교‧회전교차로 1식

◦ 사 업 비 : 4,600백만원 (공사비3,800, 보상비800) / 23년예산 : 1,500백만원

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2025년 (3년)

□ 추진실적

◦ 보상계획 공고	: `22. 05. 23.

◦ 실시설계용역 추진	: `22. 11. ~ `23. 04.

□ 기대효과

◦ 미개발 교룡초 남측지역의 활성화 및 지역주민의 숙원사업 해결

식정 관광 우회도로 개설공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 식정동 갈치삼거리 ~ 요천교 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=2.96km, B=10m, 교량2개소

◦ 사 업 비 : 12,000백만원 (국비4,613 시비7,387) / 23년예산 : 1,672백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2025년 (6년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: `20. 01. ~ ‘20. 12.

◦ 노선선정에 따른 주민설명회 실시(2회)	: `20. 05. 12. ~ 13.

◦ 각종 제반 용역 추진	: `20. 03. ~ ‘21. 03.

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

◦ 편입토지 손실보상 산정 및 협의	: `21. 11. 5. ~

□ 금후계획

◦ 사업 발주	: `23. 03.

◦ 전체 준공	: `25. 12.

신촌 소로 개설공사

(계속사업)

남원대교 4가

신촌마을

효산콘도

도로개설

L=305m,B=6m

□ 개    요

◦ 위    치 : 신촌동 396-25 일원

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=305m, B=6m

◦ 사 업 비 : 900백만원 (공사비620 보상비280) / 23년예산 : 580백만원

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2023년 (4년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 추진	: `20. 02. ~ 09.

◦ 토지 분할 및 감정평가 추진	: `21. 12. ~ ‘22. 03.

◦ 토지 보상 협의	: `22. 03.

◦ 공사 착공	: `22. 10.

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: `23. 06.

국민연금공단 옆 소로 개설공사

(신규사업)

국민연금공단

도로개설

L=110m,B=6m

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동(370-7) ~동충동(197-1)

◦ 사업내용 : 도로개설 L=110m, B=6m

◦ 사 업 비 : 300백만원(공사비270 보상비30) / 23년예산 : 300백만원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

□ 추진실적

◦ 토지보상 협의(100% 보상완료)            : `22. 06. ~ 10.

◦ 실시설계 용역 시행	: `22. 07. 27. ~ 12. 09.

□ 기대효과

◦ 구도심권(동충동) 내 도시계획도로(소로) 개설로 균형발전 도모

불무터길 소로 정비공사

(신규사업)

남원교회

불무터

마을

도로확포장

L=100m,B=5m

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 198 일원

◦ 사업내용 : 도로정비 L=100m, B=5m

◦ 사 업 비 : 500백만원(공사비350 보상비150) / 23년예산 : 500백만원

◦ 사업기간 : 2023년 (1년)

□ 추진실적

◦ 편입토지 협의매수를 위한 토지주 협의	: `22. 11.

- 실시설계 후 면적 산정에 따른 보상 추진

□ 기대효과

◦ 도로폭이 좁은 마을 진입로 정비하여 소방차 진입 및 주민통행 불편을 해소하여 지역균형발전 및 쾌적한 생활환경 조성

쑥골길 소로 개설공사

(신규사업)

명지2차@

도로개설

L=110m,B=8m

경찰서

성원고

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 왕정동 250일원

◦ 사업내용 : 도로정비 L=110m, B=8m

◦ 사 업 비 : 750백만원(공사비500 보상비250) / 23년예산 : 500백만원

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

□ 추진실적

◦ 편입토지·지장물 보상금 산정 및 협의(보상 100%) : `22. 05. ~ 08.

◦ 실시설계용역 추진	: `22. 11. ~

□ 기대효과

◦ 도시가로망 확충으로 주민 통행 불편 해소 및 지역균형발전 도모

그린뉴딜(보조)·지중화사업(시비)

중앙초	그린뉴딜 지중화 (계속사업)	용성초	그린뉴딜 지중화 (계속사업)

도통초	그린뉴딜 지중화 (계속사업)	운봉초·중	그린뉴딜 지중화 (신규사업)

노인복지센터	지중화 및 인도·도로정비 (계속사업)

□ 개    요

( 단위 : 백만원 )

사 업 명		위치	사업량	사업비						비고
				계	인도 (국비)	지중화
						소계	국비	시비	한전/통신
계		5지구	L=3,305m	20,011	6,008	12,703	1,992	5,181	5600
소계		4지구	L=3,105m	16,091	6,008	10,083	1,922	3,521	4,640
그린 뉴딜	중앙초	도통동 (동림로)	L= 770m	5,113	1,500	3,613	675	1,250	1,688	‘21~’23
	용성초	동충동 (충정로)	L= 660m	3,328	1,500	1,828	319	720	789	‘21~’23
	도통초	도통동 (대교2길)	L= 550m	3,500	1,500	2,000	400	684	916	‘22~’23
	운봉초·중	운봉읍 동천리 ~서천리	L= 1,100m	4,150	1,508	2,642	528	867	1,247	‘23~’24
소계		1지구	L= 200m	2,620	-	2,620		1,660	960
지중화	노인복지 센터	고죽동 83-2	L= 200m	2,620	-	2,620	-	1,660	960	‘22~’24

* (보조) 국비 20%, 시비30%, 한전·통신 50%, 인도·도로 정비 시비100%

□ 추진실적

사 업 명		추진실적	비고
그린뉴딜	중앙초 /용성초	◦ 그린뉴딜 지중화사업 확정내시 : ’21. 03. 24. ◦ 지중화협약 체결(한전) : ’21. 04. 27. ◦ 실시설계 추진 : ’21. 10. 18. ◦ 한전 및 통신 지중화 추진 : ’22. 09. ~12.
	도통초	◦ 지중화 사업 신청(시→한국전력공사) : ’21. 07. 14. ◦ ’22년 국비 지원 가내시(산업통산자원부) : ’21. 10. 29. ◦ ’22년 지중화 사업 확정(한국전력공사→시) : ’21. 12. 30. ◦ 지중화협약 체결(한전) : ’22. 03. 16. ◦ 공기관등 자본적위탁사업비 지급(한전) : ’22. 06. 21. ◦ 실시설계 추진 : ’22. 08. 03. ◦ 지중화협약 체결(통신) : ’22. 09. 22.
	운봉초·중	◦ 지중화 사업 신청(시→한국전력공사) : ’22. 06. 23. ◦ ’23년 지중화 지원안 통보(산업통산자원부) : ’22. 10. 13.
지중화	노인복지 센터	◦ ’22년 지중화 사업 신청(시→한국전력공사) : ’21. 07. 14. ◦ ’22년 지중화 사업 확정(한국전력공사→시) : ’21. 12. 30. ◦ 지중화협약 체결(한전) : ’22. 03. 15. ◦ 공기관등 자본적위탁사업비 지급 1차(한전) : ’22. 06. 21. ◦ 지중화협약 체결(통신) : ’22. 09. 22.

□ 금후계획

사 업 명		금후계획	비고
그린뉴딜	중앙초 /용성초	◦인도 및 도로 재포장 공사 완료 : ’23. 06. ◦한전주 및 통신주 제거 : ’23. 07.
	도통초	◦한전 및 통신 지중화 공사 : ’23. 03. ~ 07. ◦인도 및 도로 재포장 공사 완료 : ’23. 07. ~ ‘23. 12.
	운봉초·중	◦공기관 대행 사업을 위한 실시협약 및 : ’23. 01. ~ 06. 대행사업비 지급
지중화	노인복지 센터	◦지중화 실시설계용역 추진 : ’23. 02. ~ 05. ◦한전 및 통신 지중화 공사 : ’23. 06. ~ 10. ◦인도 및 도로 재포장 공사 완료 : ’23. 10. ~ ‘24. 06.

도시재생 지원센터 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2016년 ~ 도시재생사업 종료 시

◦ 운영예산 : 360백만원 (인건비, 일반운영비 등)

◦ 직원현황 : 총8명(현원7명) (기초지원센터장 부재, 현장지원센터장 3, 팀원 4)

◦ 담당업무 : 주민역량강화사업, 거버넌스(주민협의체 등) 운영관리, 사업홍보 등

□ 추진실적

◦ 도시재생대학 운영: 41과목 385명 수료

(인정사업 12과목 88명/터미널지구 10과목 89명/동문밖마을 9과목 106명/금동 10과목 102명)

◦ 주민공모사업 추진 : 10팀

◦ 선진지견학 방문(타 지자체⟹남원시) : 1회(3명)

- 대구 북성로 도시재생현장지원센터 및 주민협의체 등

- 활동가 운영사항 및 개선사항 의견 교류, 숲정이현장센터 답사

◦ 터미널지구 22년 상반기 도시재생뉴딜아카데미 성과공유회 추진

◦ 주민 간담회 : 3개지구 주민협의체, 나우원 입주자 등 (22회, 285명참석)

□ 금후계획

◦ 주민역량강화 사업 추진 : 도시재생대학, 주민공모사업 등

◦ 도시재생 거버넌스 운영 관리(주민간담회), 전담인력워크숍(월 1회)

◦ 활성화계획 수립 대응 : 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 도시재생사업 관련 계획 수립 및 변경 지원

◦ 도시재생 거점시설 운영 관리 지원

- 거점시설 : 빨간벽돌, 사랑나눔어울림센터, 청년창업공간(2개소) 등

도시재생 거점시설 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2022. 01. ~

◦ 사 업 비 : 40백만원(운영 및 유지관리비)

◦ 거점시설

시 설 명	위 치	면적	비고
커먼스페이스	하정동 59-1번지(빨간벽돌)	대지 506㎡ 연면적 197.6㎡	준공(`20)
사랑나눔어울림센터	동충동 208-1번지 일원(구.북부시장)	대지 2,160㎡ 연면적 925㎡	준공(`22)
창업공간	하정동 56-1번지(한옥군)	대지 328㎡ 연면적 94.5㎡	준공(`21)
	하정동 53-1번지(구.부채박물관)	대지 212㎡ 연면적 241.7㎡	준공(`21)

□ 추진실적

◦ 커먼스페이스 및 청년창업공간 입주 및 운영     : ‘22. 01. ~

입주공간	상호(대표)	사업아이템	비고
창업공간	고샅(오종하)	카페(제철특산물 활용)	한옥군
	추냔이네(김민화)	남원 굿즈 편집샵
	㈜도킹씨네마떼끄(김형준)	영화 및 문화 체험공간조성	구.부채박물관
커먼스페이스	Red Bricks Studio(최한범)	음악과 영상기반 콘텐츠 제작 및 교육	빨간벽돌

◦ 사랑나눔어울림센터 조성사업 준공             : `22. 02. 14.

◦ 제1회 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최        : `22. 04. 22. ~ 23.

◦ 제2회 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최        : `22. 07. 01. ~ 02.

◦ 제3회 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최        : `22. 10. 28. ~ 30.

※ NOWWON[(주)도킹씨네마떼끄 외 3팀] 자체 행사 추진

□ 금후계획

◦ 도시재생 거점시설 운영지원                        : `23. 01. ~

◦ 도시재생지원센터 이전                             : `23. 02.

◦ 사랑나눔어울림센터 사용수익 허가                  : `23. 02.

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 이음센터․숲정이마을 공유마당․상생협력상가 조성,

골목길개선사업(포켓주차장,마을쉼터 등), 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년 (5년)

◦ 사 업 비 : 14,722백만원(균특 8,500, 도비 1,416, 시비 4,806)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	14,722	11,370	3,352	0	0
균 특	8,500	6490	2010	0	0
도 비	1,416	1081	335	0	0
시 비	4,806	3799	1007	0	0

□ 추진실적

◦ 숲정이마을 공유마당 실시설계용역 착수            : `21. 12. 10.

◦ 상생협력상가 설계용역 착수                       : `22. 01. 18.

◦ 남원 이음센터 조성사업 착공                      : `22. 03. 02.

◦ 주민역량강화사업

- 뉴딜아카데미(상반기 5과목 수료34명/하반기 5과목 수료45명) : `22. 03. ~ 11.

- 도시재생마을활동가 양성교육(수료 11명)          : `22. 09. ~ 11.

- 주민공모사업 10팀                               : `22. 04. ~ 11.

◦ 도시재생 활성화계획 변경 용역 시행               : `22. 09. 13. ~

◦ 활성화계획 변경 승인 및 고시                     : `22. 12.

□ 금후계획

◦ 이음센터 준공                                    : `23. 04.

◦ 주민역량강화사업(뉴딜아카데미)                    : ~ `23. 12.

남원 도시재생 뉴딜사업(터미널지구) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비 고
계	6개 사업	14,722
골목길 경관개선	터미널주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	바닥포장 완료 벽화, CCTV·가로등설치 마을쉼터 및 포켓주차장 조성	사업 완료
숲정이마을 공유마당	마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간 등 (연면적 2,199㎡,5층)	2,899	철거공사 완료 설계공모 완료 실시설계용역 추진	설계중 공정율:70%
남원이음센터	마을카페 교통회관 사회적생산품판매장 공영주차장 등 (연면적 : 1,914㎡,3층)	7,985	설계완료 공사 진행 중	공사추진중 공정율:60%
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성 (연면적 277㎡, 2층)	1,175	구조안전진단 (E등급, 구조불안정) 건축물 철거 완료 설계추진	설계중 공정율:80%
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화 모니터링	850	주민공모사업 추진(10팀) 도시재생뉴딜아카데미운영 (상반기 4과목 34명수료) 마을활동가양성교육()
도시재생 지원센터 운영	현장지원센터 운영	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	인건비 및 센터 운영비

도시재생 인정사업(구.미도탕)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 22-1번지

◦ 사업면적 : 대지면적 886㎡ / 연면적 834㎡(지상4층)

◦ 사업내용 : 주민을 위한 문화·예술·상업·체험 복합 공간 조성

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3년)

◦ 사 업 비 : 4,389백만원 (국비 2,633, 도비 439, 시비 1,317)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	4,389	1,193	867	2,329	0
균 특	2,633	400	520	1713	-
도 비	439	67	87	285	-
시 비	1,317	726	260	331	-

□ 추진실적

◦ 도시재생 인정사업 공모 선정                   : `20. 12. 21.

◦ 구.미도탕 문화저장소 리뉴얼 사업 실시설계용역 착수 : `21. 12. 14.

◦ 제3기 문화저장 도시재생대학 운영(5과목, 수료 29명) : `22. 01. ~ 03.

◦ 제4기 문화저장 도시재생대학 운영(4과목, 수료 32명) : `22. 06. ~ 08.

◦ 제5기 문화저장 도시재생대학 운영(3과목, 수료 24명) : `22. 10. ~ 11.

◦ 문화저장소 주민한마당 행사                    : `22. 10. 28. ~ 30.

□ 금후계획

◦ 문화저장소 리뉴얼 사업(H/W) 추진                 : ~ `23. 12.

◦ 주민역량강화사업(S/W) 추진                        : ~ `23. 12.

- 문화저장 도시재생대학, 주민한마당 등

도시재생 활성화계획 수립

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 사업내용 : 활성화계획 수립 2개소 및 공모대응

◦ 사업유형 : 동문밖마을(지역특화재생), 금동노후주거지(우리동네살리기)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

◦ 사 업 비 : 250백만원 /  `23년예산 : 100백만원

□ 추진실적

◦ 원가심사 및 일상감사                              : `22. 03. 02.

◦ 협상에 의한 계약 절차 이행                        : `22. 03. ~ 04.

◦ 동문밖마을 활성화계획 수립용역 착수               : `22. 04. 19.

- 용역사 : ㈜인우

◦ 금동노후주거지 활성화계획 수립용역 착수           : `22. 04. 25.

- 용역사 : 남원새로이마을관리사회적협동조합, ㈜도시공간디자인 에이치트리

◦ 주민의견 수렴                                     : `22. 07. ~ 09.

□ 금후계획

◦ 관련부서 의견 수렴                               : `23. 01.

◦ 활성화계획(안) 수립                               : `23. 02.

◦ 주민공청회 및 의회 의견수렴 등 행정절차 이행     : `23. 03. ~ 04.

◦ 최종 활성화계획(안) 수립                          : `23. 05.

◦ 도시재생 뉴딜사업 공모 대응                      : `23. 05. ~ 12.

생활밀착형 도시재생 기술지원사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동ㆍ죽항동ㆍ금동 일원

◦ 총사업비 : 831백만원(국비 498, 도비 83, 시비 250)

◦ 사업내용

- 스마트가로등 설치 12개소

ㆍ사물감지 센서를 장착한 스마트가로등 설치

ㆍCCTV, 스마트 AED(심장제세동기), 공공 Wifi 서비스, 환경센서 설치

- 플랫폼 서비스

ㆍ운영시스템, 통합플랫폼 등을 통한 통합관제센터 연계

□ 추진실적

◦ 국토교통부 공모사업 선정                       : `21. 12. 30.

◦ 제1회 추가경정예산 확정                        : `22. 04. 06.

◦ 실시설계용역 착수                              : `22. 04. 28.

◦ 주민설명회 및 의견수렴                         : `22. 05. 17.

◦ 관련부서 의견 수렴                             : `22. 05. ~ 06.

◦ 정보통신사업 보안성 검토                       : `22. 08. 26.

◦ 소프트웨어사업 과업 심의                       : `22. 11. 09.

□ 금후계획

◦ 협상에 의한 계약 절차 이행                   : `23. 01.

- 평가위원 구성, 제안서 평가, 용역사 선정 등

◦ 용역사업 추진                                : `23. 02. ~ 06.

◦ 시범운영 및 시스템 안정화                    : `23. 07.

도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소 (금암, 월락, 향교, 왕정, 신촌, 노암)

◦ 면    적 : 2,172천㎡ (사유지 1,288천㎡, 국・공유지 884천㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년 (8년)

◦ 사 업 비 : 26,000백만원 (시비) / 2023년 예산 : 12,000백만원

◦ 연도별 투자계획                                     (단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	26,000	10,100	1,500	12,000	2,400
균 특	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	26,000	10,100	1,500	12,000	2,400

□ 추진실적

(단위: 백만원)

구 분	지정면적(㎡)	소유별(㎡)		매입현황(㎡)			비 고 (매입률)
		국공유지(필지)	사유지(필지)	기매입(필지)	22년(필지)	금액
계	2,172,324	883,610(261)	1,288,714(601)	462,359(118)	76,162(20)	1,453	42%
향교공원	486,786	217,932(68)	268,854(134)	59,920(37)	28,074(8)	695	33%
왕정공원	1,405,206	576,039(149)	829,167(378)	361,142(55)	45,172(9)	683	49%
월락공원	64,054	3,496(17)	60,558(22)	8,098(4)			13%
노암공원	108,114	12,487(14)	95,627(35)	9,607(2)	2,380(1)	44	12%
금암공원	38,257	19,988(7)	18,269(24)	16,198(19)	536(2)	31	84%
신촌공원	69,907	53,668(6)	16,239(8)	7,394(1)			46%

◦ 도시공원 사유지 매입 안내 및 협의 요청        : ‘22. 12.

□ 금후계획

◦ 도시공원 사유지 매입 추진(감정평가, 보상협의)  : ‘23. 01. ~ ‘25. 06.

어린이공원 새단장

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 어린이공원 새단장(탄성포장, 퍼걸러, 수목정비, 화장실 신축 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년 (7년)

◦ 사 업 비 : 2,000백만원 / 2023년 예산 : 200백만원

□ 추진실적

◦ ‘18 ~‘22년 새단장사업 현황

조성 년도	공원명	위치	사업비 (백만원)	사업내용
‘18년	도통3호 어린이공원	용성중 옆	100	탄성포장 400㎡, 수목식재, 점토블록포장 140㎡ 등
	도통7호 어린이공원	도통동주민센터 옆	100	탄성포장 410㎡, 콩자갈포장 112㎡ 등
	도통6호 어린이공원	물방개 워터파크	700	탄성포장 939㎡, 종합놀이대(2종), 조형분수(9종)
‘19년	향교4호 어린이공원	중앙초 옆	20	야자매트 61㎡, 수목식재 등
	도통1호 어린이공원	시청북문	90	탄성포장 384㎡, 수목식재, 화장실신축 등
	도통2호 어린이공원	녹주맥반석 옆	90	탄성포장 455㎡, 수목식재, 화장실신축 등
‘20년	향교1호 어린이공원	덕인회관 옆	60	탄성포장 262㎡, 수목식재, 화장실 신축 등
	도통5호 어린이공원	예닮교회 앞	140	탄성포장 186㎡, 수목식재, 데크설치 29㎡
‘21년	노암1호 어린이공원	노암5통	60	옥외용벤치 교체, 수목식재 등
	도통4호 어린이공원	도통초 옆	140	탄성포장 331㎡, 수목식재, 화장실신축 등
‘22년	주천송치 어린이공원	주천문화마을	70	차양설치 54㎡, 그네, 철봉 오일스테인 등
	이백서곡 어린이공원	이백문화마을	30	옥외용벤치 교체, 수목식재 등

□ 금후계획

◦‘23년 새단장사업 추진	: ‘23. 01. ~ 07.

- 위 치 : 도통1호(시청북문), 도통2호(녹주맥반석 옆), 도통3호(용성중 옆)

- 내 용 : 실시설계용역, 화장실 보수, 새단장(바닥정비, 수목정비, 편의시설 교체 등

◦ 물방개 워터파크 정상 운영                         : ‘23. 06. ~ 08.

◦ 어린이공원 시설물, 수목 연중 관리               : ‘23. 08. ~ 12.

금암공원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 사업내용 : 수국정원 및 야간경관이 특화된 가족생태 근린공원조성

-［1단계］근린생활시설 /‘20 ~‘22년 (70억)

- 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물복원, 주차장 등

-［2단계］ 관광객 유인시설 /‘22 ~‘23년 (32억)

- 프로포즈존, 수국식재, 경관조명, 까페전망대, 화장실 등

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년 (6년)

◦  총사업비 : 115억원(도 11, 시 104)  (*23년 예산 : 7억)

□ 추진실적

◦ 토지보상, 공원조성계획 수립                   :‘18 ~‘19.

◦ 금암공원 조성사업 실시설계용역                 :‘19.

◦ 공원조성계획(변경) 및 실시계획인가, 문화재 표본조사  :‘20. 03.

◦ 금암공원 조성 (1단계) 사업추진               :‘20. 04. ~‘22. 05.

- 조경·토목 : 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 쉼터 등

- 전기·통신 : 경관조명(금수정, 소나무숲, 인도교), 가로등, CCTV 등

- 기타 : 폐기물, BF인증용역, 분묘이장 등

◦ 금암공원 조성 (2단계) 사업추진                :‘22. 04. ~ 11.

- 실시설계용역(0.5억) / 수국정원 테마공원

- 카페전망대 건축(2.6억), 인도교 종점 조경(1.8억), 화장실·기반(1.2억).

□ 금후계획

◦ 금암공원 조성사업(2단계) 수국정원 조성사업(21.5억)   :‘22. 12. ~‘23. 06.

- 수국테마 조경수 식재, 포토존 등 조경시설물, 야간경관조명

◦ 금암공원 까페전망대 운영 위탁 계약, 운영추진  :‘23. 07. ~ 12.

만인공원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1 (만인공원)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년

◦ 총사업비 : 30,441백만원(국비 3,887 시비 26,554)

◦ 사업내용 : 만인공원 조성

□ 추진실적

◦ 부지매입(한국철도공사 ⇒남원시, 38,562㎡ / 97.81억)       : ‘17. 06.

◦ 만인공원 기본계획수립 용역(전북대 산학협력단)                : ‘18. 03. ~ ‘19. 01.

◦ 만인공원 조성사업 부지 유적 시굴, 발굴조사                      : ‘18. 10. ~ ‘21. 12.

◦ 코레일 추가 부지매입 협의(전북본부)                 : ‘22. 08.

◦ 코레일 부지매입(향교동 232) 공유재산 심의, 지방재정투자 심사   : ‘22. 09.

□ 금후계획

◦ 코레일 소유 토지매입(1필지/19,011㎡) 지속협의 및 매입 추진 : ‘23. 01. ~

◦ 만인공원 확장 도시계획시설 결정(변경) 행정절차 이행(마스터플랜 수립) : ‘23. 01. ~

◦ 만인공원 및 도시공원 토지매입비, 문화재 조사비 추경확보 : ‘23. 05.

◦ 문화재 시·발굴조사                               : ‘23. 06. ~ 12.

왕정공원 숲속야영장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산13번지 일원

◦ 사업내용 : 숲속야영장 조성 28,069㎡

◦ 사업내용

기본시설 : 일반야영장 29면, 글램핑장 3동

편익시설 : 쉼터 4개소, 숲속공연장 1개소, 야영장진입로 163m

위생시설 : 식수대 1동, 분리수거장 1동, 화장실 1동

체험시설 : 숲속산책로

체육시설 : 키즈놀이터 1개소

전기통신시설: 전기시설, 방송음향시설

안전시설 : CCTV, 보안등, 안전펜스, 소화기 등

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년

◦ 사 업 비 : 2,400백만원(균특 900, 도비 300, 시비 1,200)

□ 추진실적

◦ 숲속야영장 기본계획 및 실시설계용역                   :‘21. 01. ~‘21. 09.

◦ 캠핑동호회 의견수렴(한국캠핑협회 외 2개 동호회)    :‘21. 05.

◦ 숲속야영장 제반용역 및 관련부서 협의                  :‘21. 05. ~‘22. 03.

◦ 숲속야영장 조성계획 승인, 고시(전라북도)         :‘22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업(조경·토목) 착공            :‘22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업(통신) 착공                  :‘22. 10.

◦ 숲속야영장 조성사업(전기) 착공                  :‘22. 11.

□ 금후계획

◦ 숲속야영장 공사(조경·토목 / 전기 / 통신) 시행  :‘23. 01. ~‘23. 12.

◦ 숲속야영장 운영관리 조례 제정                  :‘23. 06.

쾌적한 도시공원 유지관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대상공원 : 왕정공원 외 22개소

◦ 사업내용

- 등산로변 예초(왕정,신촌,향교공원 / 13㎞)  ------  30백만원

- 등산로 정비(왕정공원, 향교공원 / 2㎞)     ------  50백만원

- 시설물 및 수목유지관리(근린·어린이공원 / 23개소) ------ 180백만원

- 탄성포장(도통3호 어린이공원 / 300㎡)     ------  30백만원

- 맨발 황토길 조성(도통근린공원 / L=400m, B=3m) ------ 150백만원

◦ 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 440백만원

□ 추진실적

◦ 신촌공원 외 3개소 등산로 정비 / 2.15㎞           : ‘22. 04. ~ 05.

◦ 도통근린공원 맨발 황토길 조성(L=94m, B=1.2m)    : ‘22. 04. ~ 06.

◦ 근린공원, 어린이공원 수목관리(제초, 풀베기, 수목전정)  : ‘22. 04. ~ 11.

◦ 김주열열사공원 / 연산홍 3,300주, 관수시설설치    : ‘22. 05.

◦ 도통1호 외 4개소 블랙박스 보안등 설치 / 보안등 12개소   : ‘22. 05. ~ 06.

◦ 근린공원, 어린이공원 수목해충방제                 : ‘22. 06. ~ 07.

□ 금후계획

◦ 등산로 정비, 맨발황토길 조성 등 실시설계용역    : ‘22. 01. ~ 03.

◦ 공원내 수목, 녹지대, 시설물 유지관리            : ‘22. 01. ~ 12.

◦ 등산로 정비, 맨발 황토길, 탄성포장설치 사업 시행   : ‘22. 04. ~ 06.