2023. 1.

2023년 주요업무 계획

환 경 사 업 소

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2022년 주요업무 결산
□ 2023년 중점 추진방향
□ 2023년 주요업무 계획
◦ 남원(3단계) 하수관로 정비사업
◦ 남원처리구역 하수관로 정비사업
◦ 아영인풍지구 하수관로 정비사업
◦ 산내지구 하수관로 정비사업
◦ 남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업
◦ 운봉지구 하수관로 정비사업
◦ 남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업
◦ 대율지구 마을하수도 설치사업
◦ 용강지구 마을하수도 설치사업
◦ 스마트 남원하수처리장 사업
◦ 유입동 노후 건물 정비
◦ 공공하수도시설 민간위탁 관리대행 사업
◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업
◦ 소규모 마을하수도시설 보강사업
◦ 현장 근무자 편의시설 설치 공사
◦ 요천생태습지공원 운영 관리

일  반  현  황

□ 기    구

									환경사업소장
									윤 종 철
하수경영담당					하수시설담당								하수처리담당										마을하수담당
김 진 홍					김 덕 곤								박 기 정										문 하 성
∘행정 종합계획 수립 ∘공공 시설물 관리 ∘공기업 특별회계 운영 ∘요천생태습지공원 관리 ∘하수도 요금 부과징수 ∘빗물이용시설 관리					∘하수도 중장기계획 수립 ∘하수관거정비 사업 추진 (남원3단계, 남원처리구역, 아영, 산내 등) ∘하수중계펌프장 관리 ∘배수설비 설치신고 및 관리 ∘하수도 원인자 부담금 부과징수								∘하수처리 종합계획 수립 ∘남원하수처리장 운영 ∘분뇨처리시설 운영 ∘슬러지 처리 탄화시설 운영 ∘음식물폐기물 처리시설 운영										∘운봉·인월 하수처리장 관리 ∘소규모 마을하수처리장 관리 ∘노후 마을하수시설 개량사업 추진 ∘낙동강수계 기금관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	4	6	7	4	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 5
현 원	21	1	11	5	2	2	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 5
증 감	△1	-	7	△1	△5	△2

□ 하수처리시설 현황

주요 하수처리시설 현황

구 분		시설용량 (㎥/일)	처리방법	면적(㎡)	준공일	비 고
남원 하수 처리 장	하수처리장	50,000	심바이오공법	36,505	1995.11.04
	분뇨처리장	50	B3	744	2004.11.08
	음식물처리장	20	혐기성소화	554	2017.05.31
	슬러지처리시설	30	건조‧탄화	906	2011.11.21
운봉하수처리장		800	회분식활성슬러지공법	3,735	2006.05.30
인월하수처리장		1,000	회분식활성슬러지공법	3,616	2006.05.30

소규모 마을하수처리시설 현황 : 62개소, 5,019㎥/일

□ 요천 생태습지공원 현황

위치	조성 규모	준공일자	주요시설
주생면 중동리 1297	145,298㎡	2014.12.01.	생태탐방로, 야구장, 다목적구장, 애견놀이터, 모정 등

2022년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 지속적인 하수도 인프라 확충으로 하수도 보급률 향상 및 주거환경개선 - 하수도 보급률 2022. 9월말 기준 92.1% (전국 94.5%, 전북 89.7%) ◦ 안정적 하수처리장 운영으로 수질환경 보전 ◦ 신재생에너지 사용으로 탄소중립 및 전기요금 절감 ◦ 악취 원인분석 및 근무환경 개선 추진 ◦ 효율적 하수도 특별회계운영 및 요천생태습지 공원 관리

□ 하수도 인프라 확충으로 하수도 보급률 향상 및 주거환경개선

◦ 지속적인 하수관로 사업 추진으로 하수도 보급률 향상 (92.1%)

정비사업 대상	사업량	대상가구	예산 (백만원)	공정률	비고
남원(3단계) 하수관로	L=55.1km	1,966	37,818	80%
남원처리구역 하수관로	L=27.0km	664	27,253	10%
아영인풍지구 하수관로	L=20.5km	473	19,556	10%
산내지구 하수관로	L=6.9km	214	7,865	40%
남원일반산업단지 주변마을	L=6.7km	99	7,735	40%

◦ 체계적인 하수관로 정비를 위한 하수도정비 기본계획 변경 수립 용역 착수

◦ 2023년 신규 하수도 정비사업 국ㆍ도비 확보

- 4개 지구 20,400백만원(국9,000 도3,240 시8,160)

□ 안정적 하수처리장 운영으로 수질환경 보전

◦ 스마트하수처리장 사업 추진 : 4,074백만원/설계발주

◦ 노후 하수처리 시설물 정비 추진 : 96건 260백만원

◦ 실시간 수질원격감시제어 시스템(TMS) 운영 : 3개소(남원, 운봉, 인월)

◦ TOC 측정기기 구입 교체(3개소/220백만원/남원,운봉,인월)

□ 신재생에너지 사용으로 탄소중립 및 전기요금 절감

◦ 하수처리장 태양광 발전설비 추진 : 4개소,  257kw, 726백만원      (단위:kwh)

연 도 별	전기사용량	태양광발전량	태양광비율	연간 절감액
2022년	4,934,896	613,057	12.4%	59백만원
2020년	4,369,928	304,270	7%	29백만원
2010년	3,988,140	112,290	2.9%	10백만원

□ 악취 원인분석 및 근무환경 개선

◦ 근무환경 개선을 위한 악취기술진단 추진(2~8월, 76백만원)

◦ 악취 저감 음식물 소화조 준설 추진(11~12월, 69백만원/560㎥)

◦ 음식물처리시설 협잡물 처리기 구입 교체 추진(12월, 1대/170백만원)

◦ 직원 복지 및 근무환경 개선 추진 : 체력단련실,샤워실 설치 및 세탁기등 교체

□ 효율적 하수도 특별회계 운영 및 요천생태습지 공원 관리

◦ 하수도 재원 확충하여 특별회계 운영(39,928백만원/2022년 예산)

- 하수도 요금 인상 추진 세입 확충 : 3,875백만원

◦ 요천생태습지공원 시설물 보강 및 정비로 시민 휴식 공간 제공

- 장미(1,240주), 잔디(1,344㎡)등 식재,태양광가로등 추가설치(5본, 26백만원)

- 애견놀이터 편의시설 및 놀이용품 구입 비치(원반 등 3종)

- 공원 야구장 운영 활성화(도민체전 및  동호인 경기 96회)

	아쉬운 점
◦ 하수도 사업구역 확대 및 환경부 재원 협의 등 행정절차 이행으로 하수관로 사업 및 스마트 하수처리장 사업 추진 지연

2023년 중점 추진방향

스마트 환경시설 운영 관리로  청정도시 건설

	중 점 추 진 과 제
◦ 하수도 인프라 확충으로 쾌적한 주거환경 개선 - 하수도시설 지속적인 확충 및 유지관리(하수도 보급률 2023년 93%달성) - 체계적인 하수도정비 기본계획 변경 수립 및 국비 확보 - 효율적 하수도 민원 서비스로 시민 불편 해소 ◦ 첨단 스마트 하수처리장 구축 및 운영 관리 - 인공지능 제어 기반 스마트 하수처리장 사업추진 - 노후 하수처리 시설물 정비로 안정적 방류 수질 확보 ◦ 농촌 마을 하수처리 환경개선 - 소규모 마을 하수처리시설 개량사업 추진 및 노후 시설물 정비 - 민간 전문 관리대행을 통한 전문적이고 안정적 소규모 시설 관리 ◦ 시민과 함께하는 힐링 공원 조성 - 자연 중심의 시민 힐링 공간 및 생태학습장 활용 - 쾌적한 요천생태습지 운영을 위한 공원시설물 지속 정비

2023년 주요업무 계획

남원(3단계) 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원처리구역 및 운봉처리구역

◦ 총사업비 : 37,818백만원(국비 22,128, 시비 15,690)

※ 2023년 사업비 : 4,949백만원 (국비 2,896, 시비 2,053)

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

◦ 사업내용

- 남원처리구역 : 하수관로 설치 L=39.9km, 배수설비 1,966가구

- 운봉처리구역 : 하수관로 개량 L=15.2km

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 용역시행	: 2017. 11. ~ 2019. 3.

◦ 공사착공	: 2020. 02.

- 공 정 율 : 81% (2022. 12월 현재)

(하수관로 39.9km 중 37.5km완료, 배수설비 1,966가구 중 1,830가구 완료)

□ 금후계획

◦ 공사시행(4차분)	: 2023. 1. ~ 6.

- 현장 및 민원관리를 위해 매주 1회 공정회의 시행 (감리단, 시공사)

- 현장관리(안내간판, 안전시설물 점검)를 위해 매주1회 합동현장점검 시행

남원처리구역 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면 용담외 15개마을

- 주천(용담ㆍ안곡), 송동(태동), 주생(부동ㆍ중동ㆍ상동ㆍ대지ㆍ소지ㆍ제천ㆍ서만), 대산(서원초),  산동(목동), 신촌동, 왕정동(화정ㆍ한우물), 광치동(광석)

◦ 총사업비 : 27,253백만원(국비 19,079, 시비 8,174)

※ 2023년 사업비 : 1,089백만원 (국비 762 시비 327)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=27.0km, 배수설비 664가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 06.

◦ 남원시 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: 2022. 01. 25.

◦ 재원협의	: 2022. 03. ~ 04.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	17,270	12,089	5,181	16㎞	2021~2024
변 경	27,253	19,079	8,174	27㎞	2021~2024
증△감	9,983	6,990	2,993	11㎞	-

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: 2022. 05. ~ 06.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: 2022. 09. 27.

◦ 조달청 발주 의뢰	: 2022. 10. 28.

□ 금후계획

◦ 공사시행	: 2023. 1. ~ 2024. 12.

아영인풍지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원

- 아영(봉대ㆍ외인ㆍ내인ㆍ매산ㆍ서갈ㆍ동갈),

- 인월(덕실ㆍ연실ㆍ자래ㆍ외건ㆍ내건ㆍ지산ㆍ흥부놀부촌ㆍ흥부골)

◦ 총사업비 : 19,556백만원(국비 12,585, 시비 6,971)

※ 2023년 사업비 : 813백만원 (국비 569 시비 244)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 (4개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=20.5km, 배수설비 473가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 06.

◦ 남원시 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: 2022. 01. 25.

◦ 재원협의	: 2022. 03. ~ 04.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	16,000	11,200	4,800	16.4㎞	2021~2024
변 경	19,556	12,585	6,971	20.5㎞	2021~2024
증△감	3,556	1,385	2,171	4.1㎞	-

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: 2022. 05. ~ 06.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: 2022. 09. 27.

◦ 조달청 발주 의뢰	: 2022. 10. 28.

□ 금후계획

◦ 공사시행	: 2023. 1. ~ 2024. 12.

산내지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산내면 일원(상황, 중황, 하황, 중기, 삼화)

◦ 총사업비 : 7,865백만원(국비 5,506 시비 2,359)

※ 2023년 사업비 : 930백만원 (국비 651 시비 279)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.9km, 배수설비 214가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 06.

◦ 재원협의	: 2022. 03. ~ 04.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	6,500	4,550	1,950	L=6.6㎞	2021~2022
변 경	7,865	5,506	2,359	L=6.9㎞	2021~2023
증△감	1,365	956	409	L=0.3㎞	1년 연장

◦ 공사 착공	: 2022. 05. 09.

- 공 정 율 : 42% (2022. 12월 현재)

(하수관로 6.9km 중 3.7km완료, 배수설비 214가구 중 –가구 완료)

□ 금후계획

◦ 공사시행	: 2023. 1. ~ 12.

남원일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원(손율, 수월, 덕평, 인화)

◦ 총사업비 : 7,735백만원(국비 3,518 시비 4,217)

※ 2023년 사업비 : 868백만원 (국비 608 시비 260)

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.7km, 배수설비 99가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: 2020. 06.

◦ 재원협의	: 2022. 03. ~ 04.

사업비	사업비			사업량	사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	5,870	4,109	1,761	6.4㎞	2021~2022
변 경	7,735	3,518	4,217	6.7㎞	2021~2023
증△감	1,865	△591	2,456	0.3㎞	1년 연장

◦ 공사 착공	: 2022. 05. 09.

- 공 정 율 : 42% (2022. 12월 현재)

(하수관로 6.7km 중 3.5km완료, 배수설비 99가구 중 -가구 완료)

□ 금후계획

◦ 공사시행	: 2023. 1. ~ 12.

운봉지구 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 일원(엄계, 삼산, 행정, 산덕, 유평, 용은, 가장, 덕산, 공안, 수월)

◦ 총사업비 : 8,700백만원(국비 5,220 시비 3,480)

※ 2023년 사업비 : 400백만원 (국비 240 시비 160)

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (4개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=8.2km, 배수설비 200여가구

□ 추진계획

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: 2017. 02.

◦ 신규사업 신청	: 2022. 03. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: 2022. 09. 21.

□ 기대효과

◦ 신규처리장 설치는 지양하고 관로확대 사업을 우선 지원하는 환경부 방침에 따라 기존 소규모 처리장(4개소)는 폐쇄하고 하수관로 연결을 통한 운봉공공하수처리장으로 연계처리

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도 복지에 기여

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2023. 1. ~ 10

◦ 재원협의(환경부)	: 2023. 11. ~ 12.

◦ 공사시행	: 2024. 1. ~ 2026. 12.

남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주천면 내기외 6개마을

- 주천(내기), 보절(진목ㆍ양촌), 산동(부절ㆍ중절), 산내(대정ㆍ백일)

◦ 총사업비 : 6,300백만원(국비 3,780 시비 2,520)

※ 2023년 사업비 : 250백만원 (국비 150 시비 100)

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (4개년)

◦ 사업내용 : 하수관로 개량 L=4.53km

□ 추진계획

◦ 하수관로 기술진단(주천면 내기외 6개마을)	: 2021. 09. ~ 2022. 02.

◦ 신규사업 신청	: 2022. 03. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: 2022. 09. 21.

□ 기대효과

◦ 7개 소규모하수처리장 하수관로에 대한 기술진단 결과 노후된 하수관로 개량을 통해 불명수 유입 차단 및 악취개선 등 주민 하수도 복지에 기여

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2023. 1. ~ 10

◦ 재원협의(환경부)	: 2023. 11. ~ 12.

◦ 공사시행	: 2024. 1. ~ 2026. 12.

대율지구 마을하수도 설치사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 사매면(대율ㆍ화정) 일원

◦ 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,800 시비 1,200)

※ 2023년 사업비 : 1,400백만원 (도비 840 시비 560)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 (3개년)

◦ 사업내용

- 소규모 하수처리시설(40㎥/일) 1개소

- 하수관로 L=2,039m, 배수설비 105가구

□ 추진계획

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: 2017. 02.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 신청	: 2022. 06. 25.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: 2022. 09. 22.

◦ 계약심의 위원회	: 2022. 11. 02.

□ 기대효과

◦ 소규모 마을하수도 설치를 통해 보편적 환경 서비스 제공 및 쾌적한 정주여건 기반 마련

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도 복지에 기여

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2023. 1. ~ 10

◦ 공사시행	: 2023. 11. ~ 2024. 12.

용강지구 마을하수도 설치사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 수지면(용강ㆍ남창) 일원

◦ 총사업비 : 2,400백만원(도비 1,440 시비 960)

※ 2023년 사업비 : 1,100백만원 (도비 660 시비 440)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 (3개년)

◦ 사업내용

- 소규모 하수처리시설(40㎥/일) 1개소

- 하수관로 L=1,352m, 배수설비 109가구

□ 추진계획

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: 2017. 02.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 신청	: 2022. 06. 25.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: 2022. 09. 22.

◦ 계약심의 위원회	: 2022. 11. 02.

□ 기대효과

◦ 소규모 마을하수도 설치를 통해 보편적 환경 서비스 제공 및 쾌적한 정주여건 기반 마련

◦ 개인정화조 폐쇄에 따른 악취개선 및 주민 하수도 복지에 기여

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 시행	: 2023. 1. ~ 10

◦ 공사시행	: 2023. 11. ~ 2024. 12.

스마트 남원하수처리장 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(남원하수처리장)

◦ 총사업비 : 4,074백만원(국비 2,037, 도비 1,018, 시비 1,019)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3개년)

◦ 사업내용

- 하수처리공정 지능화 운전, 에너지 관리 소프트웨어 적용

- 실시간 계측장비 구축을 통한 신뢰도 높은 데이터 생산

- 지능형 제어를 위한 처리시설 기능보강

➣ 운영 효율화에 의한 운영비 절감 및 안정적 방류 수질 확보

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 착수	: ‘21. 12.

◦ 스마트 하수처리장 벤치마킹 2회 실시(김제, 여주)	: ‘22. 02. ~ 03.

◦ 환경부 스마트 하수처리장 협의체 회의 참석	: ‘22. 04.

◦ 남원하수처리장 공정별 시설보강 항목조사	: ‘22. 04. ~ 07.

◦ 환경부 재원협의 신청	: ‘22. 08. ~ 11.

◦ 사업자 선정방안(협상에 의한 계약) 검토보고	: ‘22. 09. 30.

◦ 환경부 재원협의 보완자료 제출	: ‘22. 11.

◦ 계약심의위원회 심의	: ‘22. 11.

□ 금후계획

◦ 원가심사(도)	: ‘23. 01.

◦ 평가위원 모집 및 구성	: ‘23. 01. ~ 02.

◦ 계약 체결 및 사업 시행	: ‘23. 03. ~ 24. 12.

유입동 노후 건물 정비

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(남원하수처리장)

◦ 총사업비 : 350백만원(시비 350)

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년(2개년)

◦ 사업내용 : 유입동 노후화로 인한 내력 부족 및 처짐현상으로 건물 정비

□ 추진실적

◦ 유입동 노후 건물 정비 구조해석 용역(10백만원)    : ‘22. 02. ~ 04.

◦ 유입동 노후 건물 정비 실시설계 용역(10백만원)    : ‘22. 04. ~ 06.

□ 금후계획

◦ 구조해석 심의 용역	: ‘23. 01.

◦ 원가심사	: ‘23. 02.

◦ 지방계약심의위원회 심의	: ‘23. 05.

◦ 건축물 증축 인허가	: ‘23. 05.

◦ 공사 착수 및 준공	: ‘23. 06. ~ 10.

공공하수도시설 민간위탁 관리대행 사업

(계속사업)

□ 개    요

구 분	공공하수처리시설	하수슬러지처리시설	비 고
위 탁 비	1,804백만원	2,292백만원
위 탁 기 간	2023년 ~ 2027년(5년)	2020년 ~ 2024년(5년)	5년 이내 갱신가능
위 탁 시 설	마을하수 64개소, 중계펌프장 75개소	1개소
관리대행사	2022. 12월 선정계획	(유)일토씨엔엠(51%), ㈜에코비트워터(49%)
관 리 인 원	16명	10명

□ 추진실적

[공공하수처리시설]

◦ 소규모 마을하수처리시설 점검 및 정비	: ‘22. 01. ~ 12.

- 방류수질 5개항목(TN, TP, SS, TOC, 대장균) 자체점검(매주)

- 전기설비, 기계설비 점검 및 정비(62개소)

◦ 운봉·인월 공공하수처리시설 시설물 정밀 점검 및 안전점검	: ‘22. 04. ~ 11.

◦ 공공하수도시설 관리대행 원가산정 용역 완료	: ‘22. 08.

◦ 공공하수도시설 용역 계약심의	: ‘22. 11.

◦ 공공하수도시설 관리대행 용역기술제안서 공고	: ‘22. 11. ~ 12

[하수슬러지처리시설]

◦ 하수 처리시설 슬러지 및 탄화물 처리 : 슬러지 6,846톤, 탄화물 535톤 재활용

◦ 시설물 점검 및 정비, 안전교육 실시로 설비의 효율적인 운영

- 공정별 시설물 세부점검(상시) 및 정비(41백만원, 28건)

- 안전사고, 소방안전 교육(매달), 악취 및 탄화물 성분분석(분기별)

□ 금후계획

[공공하수처리시설]

◦ 공공하수처리시설 관리대행 용업 업체 선정	: ‘22. 12.

◦ 공공하수처리시설 관리대행 업무 개시	: ‘23. 01.

[하수슬러지처리시설]

◦ 공공하수처리시설 관리대행 업무 개시	: ‘23. 01.

◦ 전년도 성과평가 실시	: ‘23. 03.

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 2개소 (양촌, 내기)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2024

◦ 총사업비 : 3,488백만원 (국1,047, 시 2,441)

※ 2023년 사업비 : 600백만원(양촌 370, 내기 230)

◦ 사업내용

- (양촌) 양촌(진목) 통합개량 (Q=50㎥/일), 하수관로 신설 (L=1.6km)

- (내기) 전면 개량 (Q=30㎥/일)

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계용역 착수	: ‘22. 02.

- 1차(기관), 2차(위원) 평가 완료 및 공법선정	: ‘22. 04. ~ 05.

◦ 전라북도 설치인가 및 재원 협의	: ‘22. 11. ~ 12.

- 재원 협의 후 총사업비 변경 (국비 417백만원 증가) 예상됨

구 분	사 업 비 (백만원)			사업기간	비 고
	합 계	국 비	시 비
당 초	2,100	630	1,470	2023~2024
변 경	3,488	1,047	2,441	2023~2024
증△감	1,388	417	971

□ 금후계획

◦ 공사 착공 및 준공	: ‘23. 01. ~ ‘24. 10.

- 전라북도 원가심사 및 업체선정	: ‘23. 01. ~ 02.

- 공사 착공	: ‘23. 05. ~ 08.

- 시운전 및 준공	: ‘24. 01. ~ 10.

- 소규모 마을하수 및 중계펌프 시설 -

마을 하수도시설 보강사업 추진

(계속사업)

□ 개    요

◦ 시설현황 : 139개소(공공하수처리시설 64개소, 중계펌프장 75개소)

◦ 사업기간 : 2023년도

◦ 사 업 비 : 880백만원(시비880백만원)

◦ 사업내용

- (토목·건축) 하신 마을하수처리장 주변 옹벽 보강공사

- (기      계) 자동스크린 설치 4개소, 노후시설 보강공사 3개소, 운봉·인월 하수처리장 방류 여과기 보수공사, 자외선 소독기 교체 20개소.

- (전기·계측) 전기 모터 제어반 교체 2개소, 자동제어설비(PLC) 설치 5개소, 방류수 유량계 교체 20개소.

□ 추진실적

◦ 하수도법에 의거 기술 진단 시행 후 보수 대상 조사 : ‘22. 07. ~ 08.

□ 금후계획

◦ 기계설비 정비사업(530백만원)

- 세목스크린 설치 4개소 (옹정, 대정, 인월, 용산)	: ‘23. 01. ~ 06.

- 마을하수도 노후시설 보강공사 (장교, 매요, 벌촌)	: ‘23. 01. ~ 06.

- 운봉·인월 하수처리장 방류 여과기 보수공사	: ‘23. 01. ~ 06.

- 자외선 소독기 교체  20개소	: ‘23. 03. ~ 06.

◦ 전기 및 계측제어 설비 정비사업(320백만원)

- 전기 모터제어반 교체 2개소 (하신, 방동)	: ‘23. 02. ~ 06.

- 자동제어설비(PLC) 설치 5개소	: ‘23. 02. ~ 06.

- 방류수 유량계 교체 20개소	: ‘23. 01. ~ 06.

◦ 하신 마을 하수 처리장 보강 공사 (30백만원)	: ‘23. 04. ~ 06.

현장 근무자 편의시설 설치공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 시설지역 : 남원시 환경사업소

◦ 사업기간 : 2023. 2. ~ 6.

◦ 사 업 비 : 100백만원(시비100백만원)

◦ 사업내용

- 편의시설을 설치하여 근무 환경개선.

- 휴게실, 샤워장, 찜질방 등을 설치하여 직원 위생 및 복지 증진.

- 휴식을 취함으로써 업무를 안전하게 수행할 수 있고, 업무 피로 및 직무스트레스로 인한 재해 예방.

□ 추진실적

◦ 기본설계 실시 및 예산확보	: ‘22. 12.

구 분	공 정	금액 (천원)	비 고
1	철거공사(바닥 및 배관연결 철거)	5,000
2	화장실 및 샤워실 설치 (약 21㎡)	20,000
3	찜질방 설치 (약 10㎡)	10,000
4	수장공사(천정 텍스 설치 및 벽체 설치 등)	10,000
5	창호 및 유리공사(창호 교체)	15,000
6	휴게실 설치 (약 17㎡, 벽체 및 전기 판넬설치 둥)	15,000
7	기타 (기계설비, 냉난방기, 전기 및 통신공사 등)	25,000
합 계		100,000

□ 금후계획

◦기존건물을 활용한 행정절차 추진	: ‘23. 02. ~ ‘23. 03.

◦공사 착공 및 준공	: ‘23. 01. ~ ‘23. 06.

요천생태습지공원 운영관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 중동리 1295번지 일원

◦ 공원규모 : 145,298㎡ (공원부 75,562㎡ / 습지부 69,736㎡)

- 주요시설 : 야구장, 생태탐방로, 모정, 애견놀이터, 수생식물 등 관찰데크 등

◦ 관리인력 : 2명(환경관리원 1명, 시설관리원 1명)  *공공근로 (2명)

◦ 방문객 수 : 30,286명 (공원 21,908명, 애견놀이터 8,378명)  ※ 11.29일 기준

※ 2021년 26,113명 (공원 19,900명, 애견놀이터 6,213명)

□ 추진실적

◦ 수목식재 등 환경정비 : 잔디 (1,344㎡),  땅장미 (1,240주), 코스모스 (1,600㎡) 등

◦ 생태습지 및 애견놀이터 시설물 보수 및 정비

- 도색 및 야외탁자 추가 비치 (벤치, 탁자, 그네 등 총 88개소)

- 화장실 수리, 시설물 관리용 표찰보수, 분수 교반모터 정비

- 분수 및 모정, 개수대, 데크보수 및 습지부 준설 등

- 산책로 태양광 가로등 추가(5본), CCTV교체, 모정 LED설치

- 애견놀이터 반려견 놀이용품 비치 (원반 등 3종) 및 파라솔 추가설치

◦ 생태습지공원 내 취사구간(3,000㎡) 운영관리

◦ 야구장 시설 보강(교육체육과) : 플라이망, 안전매트, 앙투카 등

◦ 야구장 사용협약체결(‘22.2. ~‘25.2.) 및 동호인 연중 리그전 개최 운영

□ 금후계획

◦ 파크골프장(9홀) 조성 - 교육체육과 추진 연계

◦ 시설물 보수 및 예초 작업 등 요천생태습지공원 지속 정비

◦ 생태복원 현황 파악을 위한 수질검사실시 (7개항목 / 분기별 4개소)

◦ 하수처리장과 연계한 생태환경학습장 운영 홍보 : 유치원, 초·중·고등학교 등