2023. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

산 림 녹 지 과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 사방사업(도직영)

◦ 산사태 예방 소규모 사방사업

◦ 산불방지 대책

◦ 숲가꾸기사업

◦ 산림병해충 방제

◦ 복지시설 나눔숲 조성사업(공모)

◦ 스마트 가든 설치사업(공모)

◦ 유아숲 체험원 조성사업(공모)

◦ 마을숲·보호수 등 관리

◦ 조경시설지 관리

◦ 조림사업

◦ 목재산업시설 현대화지원사업

◦ 임도사업

◦ 등산로 정비사업

◦ 산림휴양치유마을만들기사업(전환)

◦ 산림소득증대사업

◦ 백두대간생태교육장 관리 및 운영

◦ 백두대간 워케이션 빌리지 조성사업

일  반  현  황

□ 기    구

										산림녹지과장
										안 성 순
산림정책					산림보호						산림소득								녹지관리						백두생태
안 길 재					김 인 규						허 정 철								신 은 미						소 민 정
산지전용허가 사방사업시행 산사태취약관리 자연휴양림관리 국가산림문화자산 공유재산관리					산불방지대책추진 토석채취허가지도 산림병해충방제 숲가꾸기사업 산림피해단속사건 산림보호구역관리						임도개설 및 관리 숲길(등산로)정비 임업후계자 조림사업추진 산림소득사업 산림경영계획인가								가로수조성·관리 스마트가든 복지시설나눔숲 공공산림가꾸기 재해우려목제거 보호수ㆍ노거수 관리 꽃단지 조성관리						백두대간생태 교육장 및 전시관 체험ㆍ휴양시설 생태관광에코롯지 국민여가캠핑장 운영및관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	22	1	5	4	10	2
현 원	20	1	7	7	1	4
증 감	△2	-	2	3	△9	2

2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 산림재해방지 강화로 시민 안전망 구축 - 산불방지대책본부 21개소, 사방사업 21개소/6,043백만원, 재선충방제 45.12ha ◦ 생활권 실내·외 정원 등 쾌적한 생활밀착 녹지대 환경조성 - 가로수 449km/14만본, 녹지대 332,140㎡, 꽃단지 조성 85,541㎡ ◦ 임산물 재배농가 지원 확대를 통한 농가경영 안정화 도모 - 임산물 상품화 지원사업 등 13개사업 255개소 2,139백만원 ◦ 백두대간 생태교육장 활성화 추진 (‘22년 동월 대비 방문객 28%증가) - 겨울방학특별전(9,833명), 가정의달 소규모 체험행사 진행

□ 산림재해예방 강화로 시민 안전망 구축

◦ 산사태 등 산림재해방지를 위한 사방사업* 및 산사태 발생 우려지역 실태조사**시행

* 사방사업(도 산림환경연구소 시행)	: 21개소 6,043백만원

- 사방댐 14, 계류보전 4, 산지사방 2, 유역관리 1

** 산사태발생 우려지역 실태조사	: 28개소 20백만원

◦ 산불 발생 및 피해 최소화를 위한 산불방지대책본부 운영* 및 산불대응체계 구축**

* 산불방지대책본부 21개소 운영, 산불방지인력 운영(120명), 임차헬기

배치(1대 / 1,500ℓ) 등 체계적인 산불방지대책본부 운영

** 산불지휘차량 현황판 모니터 구입(3면), 산불예방전문진화대 개인장비, 읍․면․동 산불근무자 진화복 및 안전화 지급 등 산불대응체계 구축

◦ 예찰·진단 고도화와 집중 방제*로 산불병해충 피해확산 예방

* 상반기 소나무재선충병 방제사업 추진        : 45.12ha 91백만원

◦ 공공 산림가꾸기사업* 활용 등 재해 대비 사전 정비 및 신속 대응처리

* 생활권 재해우려목 제거사업(1차)	: 29본 20백만원

* 숲가꾸기 패트롤 작업단 운영	: 205본

◦ 보호수 안전진단(61본 / 31백만원) , 생활권 수목진료 컨설팅(25본 / 6백만원)

□ 생활권 실내·외 정원 등 쾌적한 생활밀착 녹지대 환경조성

◦ 복지시설 나눔숲(실외) 조성	: 200백만원(녹색자금) / 남원의료원

◦ 스마트가든볼 설치	: 90백만원(국45, 시45) / ㈜시온테크 등 3개소

◦ 마을숲 정비 및 가로수 관리	: 수목전정 248주, 수목식재(소나무 외 5종)

409주 93백만원 / 보절면 벌촌마을숲 등 14개소

◦ 보호수 및 노거수 정비 사업 : 75백만원 / 인월면 서무리 905번지 등 11개소 12본

◦ 조경수 관리 인력 운영 전지작업 : 향기원 등 23개소 / 소나무 등 32종 9,714주

◦ 시가지 꽃단지 조성 및 관리 : 덕음산 오감만족 숲 등 4개소 85,541㎡

□ 효율적 산지개발 및 경영

◦ 산림경영 및 임산물 활용*을 통한 산주 소득 증대 및 산지전용 등을 통한 산지 개발**

* 산림경영계획인가·산림시업신고 : 79건 / 임산물굴취허가 58건

소나무류 생산확인 : 215건

** 산지전용허가·신고 : 340건 / 산지일시사용허가·신고 150건

◦ 기후변화 대응 및 탄소중립 기여하는 산림조성*

* 조림사업                  : 경제림·미세먼지저감 등 161㏊ 926백만원

* 특용수 및 유휴토지 조림사업(두릅, 옻, 호두 등)	: 72농가 120백만원

* 공익림·어린나무·큰나무·조림지 등 숲가꾸기	: 1,323ha 841백만원

◦ 재해의 신속한 대응과 효율적인 산림사업 실행을 위한 임도시설* 확충

* 임도신설사업 : 작업·간선임도 4.8km (이백 효기 외 2노선 1,240백만원)       * 임도구조개량사업 : 3.0km (대산풍촌, 교룡산, 인월자래 등  273백만원)

□ 임산물 재배농가 지원 확대

◦ 임산물 생산·가공·유통사업 지원*으로 임가 소득향상 및 경영 안정화 기여

* 산림소득 국비사업(임산물 상품화 등 6개 사업)    : 169개소 694백만원

* 백두대간 주민소득 지원사업	: 21개소 115백만원

* 산림소득 자체사업(산림소득작물 재배지원 등 5개 사업)  : 62개소 144백만원

□ 백두대간 생태교육장 활성화 추진

◦ 백두대간생태교육장 ′22년 동월 대비 방문객 28% 증가

년 도	구 분	계	전시관	체험·휴양시설		에코롯지	국민여가 캠핑장
				트리하우스	힐링캠핑장
2022년 (4월말)	방 문 객(명)	14,420	10,780	160	200	712	2,568
	수입액(천원)	52,727	7,877	3,670	1,000	20,920	19,260
2023년 (4월말)	방 문 객(명)	18,475	13,371	300	324	908	3,572
	수입액(천원)	75,754	12,094	6,000	1,620	29,280	26,760

◦ 백두대간생태교육장 특별기획전 및 소규모 행사추진 : 2회

- 겨울방학 곤충 특별기획전 : 2022. 12. 20. ~ 2023. 2. 12.

· 행사 실적 : 방문객 9,833명(평일 평균 방문객 수 대비 129% 증가)

- 5월 가정의 달 소규모 체험행사 기획 추진 : 2023. 5. 5. ~ 5. 29.

	하반기 추진방향
◦ 산불, 산사태, 산림병해충의 3대 산림재난에 선제적 대비 - 산림재해예방 강화로 시민 안전망 구축 ◦ 시민의 삶을 보듬는 도시녹색공간 조성 및 탄소중립에 기여 - 산림의 공익기능 제고를 위한 산림보전과 녹색공간조성 확대 ◦ 목재이용 증진과 임가소득향상 등 경제임업 육성 - 임업직불제 홍보 및 경제림 중심의 산림경영관리 강화 ◦ 산림치유 등 산림복지 다각화하여 시민행복 증진에 기여 - 백두대간생태교육장 명품시설도약을 위한 활성화 도모

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

사방사업(도 직영)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 산사태취약지역

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사 업 량 : 21개소(사방댐 14, 계류보전 4, 산지사방 2, 유역관리 1)

◦ 사 업 비 : 6,043백만원(국비 4,230, 도비 1,269, 시비 544)

※ 전북도 사방사업 총 예산 중 남원시 19% 차지

※ 최근 3년(2020~2022년) 사업현황

연 도 별	사 업 유 형 별				사 업 비 (백만원)	비 고
2022 (20개소)	산지사방	2	계류보전	3	5,519
	사 방 댐	14	유역관리	1
2021 (13개소)	산지사방	2	계류보전	4	3,780
	사 방 댐	6	유역관리	1
2020 (13개소)	산지사방	2	계류보전	4	3,630
	사 방 댐	7

□ 추진실적

◦ 2023년 산림유역관리사업 공모 선정          : 2022. 9. 20.

◦ 2023년 사업대상지 현장심사(도 산림환경연구소)  : 2022. 10. 26. ~ 10. 28.

◦ 2023년 사방사업 예정지 알림                 : 2022. 11월

◦ 사방사업 편입부지 관련법 협의               : 2023. 2월 ~ 3월

◦ 2024년 사방사업 대상지 조사                 : 2023. 2월 ~ 6월

◦ 2024년 산림유역관리 공모사업 계획서 제출    : 2023. 3. 31.

□ 금후계획

◦ 2024년 사방사업 대상지 제출                  : 2023. 6월중

◦ 2024년 산림유역관리 공모사업 현장심사(산림청) : 2023. 8월중

◦ 2024년 사방사업 대상지 현장심사(도 합동)      : 2023. 9월중

산사태 예방 소규모 사방사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사 업 량 : 7개소

◦ 사 업 비 : 300백만원(시비)

◦ 사업내용 : 소규모 사방사업 시행(재해 우려 생활권 주변 임야)

□ 추진실적

◦ 산사태 예방 소규모 사방사업 대상지 조사        : 2023. 1월 ~ 2월

◦ 실시설계 용역 착공                             : 2023. 3. 20.

◦ 사방사업 편입토지 사용동의 절차 이행           : 2023. 4월 ~ 5월

□ 쟁점 및 대책

◦ 인접 편입토지 산주 토지사용 승락서 징취 지난

□ 편입토지에 대한 사방사업 추진 필요성의 충분한 설명으로 산주동의서    징취

□ 금후계획

◦ 소규모 사방공사 착공                           : 2023. 5월중

◦ 소규모 사방공사 준공                           : 2023. 8월중

◦ 2024년 산사태 예방 소규모 사방사업 대상지 조사 : 2023. 10월 ~ 12월

산불방지 대책

(계속사업)

□ 개    요

◦ 임야면적 : 46,604ha(시 면적의 62.4%)

◦ 사 업 비 : 2,321백만원(국비 385, 도비 308, 시비 1,628)

◦ 기    간 : 봄철(2. 1. ~ 5. 15.) / 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)

◦ 사업내용 : 산불진화인력 등 120명 사역, 임차 헬기 1대 배치(1,500ℓ), 안전장비 및 홍보물품 구입 등

※ 2023년 산불발생 피해현황 : 4건 / 1.9ha(2023. 5. 9 기준)

□ 추진실적

◦‘23년도 산불방지종합대책 수립	: 2023. 1월중

◦ 산불방지 대책본부 운영 : 봄철(2. 1 ~ 5. 15) / 가을철(11. 1 ~ 12. 15)

- 대책본부 : 산림녹지과 외 20개 읍·면·동

- 운영인원 : 120명(산불전문예방진화대 27, 산상감시원 21, 기동순찰대원 72)

- 임차헬기 배치 : 봄철(1. 27. ~ 6. 15.) / 가을철(10. 20. ~ 12. 8.)

- 입산통제구역(5,801ha) 지정 및 등산로(24km) 폐쇄

◦ 산불진화차량 및 수송차량 임차(2대/75백만원)	: 2023. 2월 ~ 5월

◦ 소방시설 유지․보수 점검(2개소/	83백만원)	: 2023. 2월 ~ 12월

◦ 읍․면․동 산불근무자 산불복 및 안전화 배포(282명/92백만원) : 2023. 2월 ~ 5월

◦ 산불지휘차량 현황판 모니터 구입(3면/8백만원)	: 2023. 2월

◦ 산불진화장비 및 홍보물품 등 구입(리플릿 등/56백만원)	: 2023. 1월 ~ 5월

□ 금후계획

◦‘23년도 가을철 산불방지종합대책 수립	: 2023. 10월중

◦ 가을철 산불예방 홍보물품 및 장비 구입	: 2023. 10월 ~ 12월

◦ 가을철 산불방지 대책본부 운영	: 2023. 11. 1. ~ 12. 15.

◦ 입산통제구역 및 등산로폐쇄 고시공고	: 2023. 11. 1. ~ 12. 15.

숲가꾸기사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사 업 지 : 남원시 관내 조림지 및 육림대상지

◦ 사 업 량 : 1,313ha

◦ 사 업 비 : 2,462백만원(국비 1,231, 도비 369, 시비 862)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 조림지가꾸기(풀베기/덩굴제거), 어린나무가꾸기, 큰나무가꾸기, 산불예방숲가꾸기, 공익숲가꾸기

□ 추진실적

◦ 공익림가꾸기사업완료(33ha/82백만원)	: 2023. 2. 22 ~ 5. 30

◦ 큰나무가꾸기사업완료(40ha/66백만원)	: 2023. 2. 27 ~ 4. 17

◦ 산불예방숲가꾸기사업완료(60ha/203백만원)	: 2023. 2. 27. ~ 4. 17

◦ 어린나무가꾸기사업완료(250ha/451백만원)	: 2023. 4 . 3 ~ 5. 20

◦ 조림지가꾸기 실시설계용역완료(940ha/39백만원) : 2023. 4. 14 ~ 5. 8

□ 금후계획

◦ 숲가꾸기 사업 시행

- 덩굴제거 사업 시행(110ha/181백만원)	: 2023. 6월~ 8월

- 조림지풀베기 사업 시행(940ha/1,381백만원)	: 2023. 6월 ~ 9월

◦ 2024년도 숲가꾸기 사업 사전설계	: 2023. 10월~ 12월

산림병해충 방제

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사 업 량 : 196ha(일반병해충 116ha, 소나무재선충 80ha)

◦ 사 업 비 : 223백만원(국비 144, 도비 24, 시비 55)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 소나무재선충병 방제사업 및 반출금지구역 관리, 산림병해충 예찰 및 방제, 산림병해충 예찰방제단 운영

□ 추진실적

◦ 소나무재선충병 발생현황(27본)	: 2020. 1. 2. ~ 현재

- 감염목 26본 방제 완료, 미완료 1본 하반기 방제 예정

- 소나무류 반출금지구역 지정(‘23. 5월 기준) : 35개 동·리 /9,802ha

◦ 소나무재선충병 방제사업 시행(45.12ha)	: 2023. 2. 20. ~ 4. 10.

◦ 예찰방제단 예찰활동 및 검경의뢰(514건)	: 연중

□ 금후계획

◦ 하반기 소나무재선충병 방제사업 추진	: 2023. 10월 ~ 12월

- 위    치 : 용정동, 화정동, 주생면 정송리 등

- 주요내용 : 고사목 벌채‧파쇄, 미 감염목 예방나무주사

◦ 산림병해충 예찰·방제단 운영(4명)	: 2023. 2월 ~ 12월

◦ 농림지 및 산림병해충 지상방제	(4회)	: 2023. 2월 ~ 10월

- 위    치 : 농림지 인근 산림, 교룡산임도 및 지리산둘레길, 100리숲길 등

- 주요내용 : 병해충(흰불나방, 진딧물 등)방제를 위한 약제 살포

복지시설 나눔숲 조성사업(공모)

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 월락동 252 일원(남원의료원)

◦ 사업규모 : 3,200㎡

◦ 사 업 비 : 200백만원(녹색자금)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 5월

◦ 사업내용 : 기반조성, 수목(교목‧관목) 식재, 퍼걸러, 벤치 설치 등

□ 추진실적

◦ 현지조사 및 의료원 관계자 면담(1차)	: 2023. 1월

◦ 실시설계 용역 / 10백만원	: 2023. 1. 26. ~ 3. 6.

- 수요기관 추가 면담(2~4차)

◦ 녹색자금 자문위원 현장자문(1차)	: 2023. 3. 3.

◦ 사업 시행	: 2023. 4. 11. ~ 5. 30.

◦ 복지시설 나눔숲 조성 협약서 작성	: 2023. 5. 12.

◦ 녹색자금 자문위원 현장자문(2차)	: 2023. 5. 15.

※ 2022년 추진실적

- 효성의집 : 1,148㎡ / 163백만원 / 2022년 기관평가 : 우수상 수상

□ 쟁점 및 대책

◦ 수요기관의 희망 사업량에 비해 사업비 부족하여 사업 면적 조정 시행

□  2024년도 공모 신청 안내 등 연차별 사업토록 노력

□ 금후계획

◦ 2023년 나눔숲 평가 대응	: 2023. 11월중

◦ 사후관리	: 계속

스마트가든 조성사업(공모)

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암산업단지[㈜시온테크], 공공기관(아영면·향교동 행정복지센터)

◦ 사업규모 : 3개소 / 74㎡

◦ 사 업 비 : 90백만원(국비 45, 시비 45)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 6월

◦ 사업내용 : 노후 산업단지, 공공시설에 실내 휴식공간 제공으로 근로자 및 이용객의 만족도 제고

□ 추진실적

◦ 수요기관 사업 추진 동의서 징구	: 2023. 1. 9. ~ 1. 18.

◦ 실시설계 용역 / 5백만원	: 2023. 2. 8. ~ 3. 16.

◦ 사업시행	: 2023. 5. 8. ~ 6. 4.

※ 22년 추진실적(3개소 / 90백만원)

- 산업단지 2개소[(주)중앙일렉파워,(주)에코에너지원]

- 공공기관 1개소(농업기술센터)

□ 쟁점 및 대책

◦ 사업 완료 후 고사식물 교체 등 수요기관의 유지관리 미흡

□ 수시점검 시행으로 수요 기관에 관리 요청(사업 신청 시 사업 후 5년간 사후관리 실시 동의서 작성)

□ 금후계획

◦ 사후관리	: 계속

유아숲 체험원 조성사업(공모)

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 300-5번지 일원 (김병종 미술관 앞 임야)

◦ 사업규모 : 1.0ha

◦ 사 업 비 : 500백만원(도비 300, 시비 200)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 야외체험학습장, 대피시설, 안전시설, 휴게시설 설치 등

□ 추진실적

◦ 2022년 제2회 추가경정예산 편성	: 2022. 9. 30.

◦ 유아숲 체험원 조성사업 추진계획 보고	: 2022. 10. 19.

◦ 협상에 의한 계약 타당성 검토(문화예술과)	: 2023. 5. 3.

□ 쟁점 및 대책

◦ 타부서 유사 사업과 병합 발주하여 추진중인 사업으로『협상에 의한 계약』절차 이행중으로 조기 착공 지연

□ 절차 완료 후 신속한 사업 추진으로 연내 사업 완료

□ 금후계획

◦ 입찰 공고                                     : 2023. 5월 ~ 6월

◦ 제안서 평가위원회 개최                        : 2023. 6월중

◦ 사업 시행                                     : 2023. 6월 ~ 12월

◦ 유아숲 체험원 등록(전라북도)                   : 2024. 6월한

◦ 사후관리                                      : 계속

마을숲·보호수 등 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 관리대상 : 마을숲 35개소, 보호수 83본, 노거수 524본

◦ 사 업 비 : 434백만원(국비 94, 도비 99, 시비 240)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 수목 생육개선(외과수술, 방부처리 등) 및 주변 정비, 보호수 안전진단, 생활권 수목진료, 재해우려목 제거 등

□ 추진실적

◦ 보호수 및 노거수 정비사업 실시설계용역	: 2023. 2. 15. ~ 3. 31.

◦ 생활권 수목진료 컨설팅용역	: 2023. 3. 16 ~ 10. 31.

- 25주 / 6백만원 / 컨설팅 시행 본수 : 3본

◦ 마을숲 정비사업 실시설계용역	: 2023. 3. 20. ~ 4. 3.

◦ 보호수 주변 정비사업(주민참여예산)	: 2023. 4. 3. ~ 4. 30.

- 사매면 풍촌마을 / 조경석쌓기 10m, 잔디식재 558㎡ 등 / 18백만원

◦ 마을숲 정비사업 시행	: 2023. 4. 13. ~ 5. 13.

- 보절면 황벌리 67 등 4개소 / 전정 79본, 식재 11본 / 24백만원

◦ 보호수 및 노거수 정비사업(1차)	: 2023. 4. 18. ~ 5. 27.

- 인월면 서무리 905번지 등 11개소 / 12본 / 75백만원

□ 쟁점 및 대책

◦ 마을숲·보호수 등 노령화 및 수세 약화로 체계적인 위험성 평가 및 관리 필요

□ 보호수 : 안전(기본)진단과 정밀(분석)진단을 통해 위험·정비 요소 파악하여 보완사업 시행

□ 마을숲 : 수목진료컨설팅 사업으로 관리 추진

□ 금후계획

◦ 보호수 정기점검 시행	: 2023. 6월 ~ 7월

◦ 도심 생활권 내 보호수 안전진단 및 정밀진단 시행 : 2023. 6월 ~ 8월

- 안전진단 61본, 정밀진단 11본(22년 안전진단 시 정밀진단 필요 의견)

◦ 보호수 및 노거수 정비사업(2차) 시행	: 2023. 6월 ~ 11월

조경시설지 관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 가로수, 녹지대, 요천100리 숲길, 꽃단지 4개소 등

◦ 사업규모 : 가로수 449km 14만본, 녹지대 332,140㎡, 꽃단지 85,541㎡

◦ 총사업비 : 1,216백만원 (시비)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 전지, 전정, 예·제초작업, 꽃묘 식재 등

□ 추진실적

◦ 요천 꽃단지 등 5개소 튤립 식재(36,000본)	: 2022. 11. ~ 2023. 2. 22

- 굴취 구근 배부(도통동 등 22개소) / 27,100본

◦ 초봄 꽃(비올라, 팬지) 식재	: 2023. 2. 23. ~ 3. 31.

- 식재 : 꽃다리 등 24개소, 42,750본 / 배부 : 수지면 등 6개소, 5,020본

◦ 화단, 녹지대 관리	: 2023. 2월 ~ 11월

구 분	자체 추진		사업 발주			비 고
	위 치	작 업 량	위 치	작 업 량	사업비 (백만원)
4종					359
전지 전정	향기원 등 23개소	소나무 등 32종 9,714주	광한서로 등 2개소	느티 등 2종 169주	18
병해충방제	시청로 등 7개소	살구, 느티 등 3,293본	요천변 등 19개소	소나무 378주	8
예초			오들로 등 10개 노선	80,100㎡	37
제초			요천로 등 18개 노선	135,666㎡	296

◦ 신생마을 가을꽃(아스타, 백일홍, 코키아 등) 식재     : 2023. 4. 10. ~ 6월

◦ 벤치마킹 시행(순천만국제정원박람회)           : 2023. 4. 7.

◦ 여름 꽃(산파첸스, 페츄니아, 천일홍 등) 식재    : 2023. 4. 24. ~ 5. 23.

- 춘향제 대비 환경 정비 병행 추진

□ 쟁점 및 대책

◦ 정비대상 증가에 따른 관리 비용 증가 및 관리 지연으로 미관 저해 요소

□ 자체 인력 적극 활용과 동시다발적 관리로 쾌적한 환경 조성

□ 금후계획

◦ 녹지대 예·제초작업(2 ~ 4차)	: 2023. 9. 22.한

◦ 가을․겨울꽃(사루비아, 맨드라미 등) 식재	: 2023. 9월 ~ 11월

◦ 2024년 개화용 튤립 식재	: 2023. 12월한

◦ 벤치마킹 시행(옥정호공원 등)	: 수시

◦ 가로수(병해충 방제 등) 생활 민

조 림 사 업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 수지면 고평리 산60번지 등 255필지

◦ 사 업 량 : 206ha(편백, 낙엽송, 상수리, 백합 등 식재)

◦ 사 업 비 : 1,496백만원 (국비 625, 도비 232, 시비 639)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

□ 추진실적

사 업 명	사업량 (ha)	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계	161	926
경제림 조성	100	597	벌기령 벌채지, 수종갱신지 식재	편백, 상수리, 낙엽송, 물푸레
특용수 및 유휴토지조림	20	123	임야, 한계농지, 마을 공한지 묘목비 보조
큰나무공익조림	3	34	도로변 등 경관보전이 필요한 산림 식재
산림재해방지조림	14	66	산림재해지 및 재해우려지 식재	편백, 낙엽송, 상수리, 백합
내화수림대조성	9	46	대형산불피해지 및 산불피해우려지 식재	상수리, 백합
탄소저감조림	15	60	도시외곽 및 산업단지 인근 산림 식재	편백

◦ 봄철 조림사업 시행 : 3월 ~ 5월

□ 금후계획

◦ 조림지 활착상황 조사                           : 2023년 7월 ~  8월

◦ 가을철 조림사업 설계 및 사업 시행             : 2023년 8월 ~ 10월

- 경제림 조성 / 35ha (편백, 백합)

- 지역특화조림(남원목기산업특화림) / 10ha (옻나무)

◦ 2024년 봄철 조림사업 대상지 조사             : 2023년 12월

목재산업시설 현대화지원사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업대상자 : 1개소(관내 제재업 등록업체)

◦ 사  업  비 : 200백만원 (국 80, 도 12, 시 28, 자부담 80)

◦ 사 업 기 간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사 업 내 용 : 건조, 제재ㆍ가공, 방부시설 등 목재산업시설 현대화

□ 추진실적

◦ 2023년 목재산업시설 현대화지원사업 공모선정       : 2022. 12. 26.

◦ 2023년 목재산업시설 현대화지원사업 시행

사업자	사업비(백만원)			사업내용	비 고
	계	보조	자부담
계	524	237	287
고진케이우드	238	117	121	반자동 핑거조인트 접합기 구입	2022년도 이월사업
에코에너지원(주)	286	120	166	여과집진시설 설치	사업대상자 확정

□ 금후계획

◦ 2022년 목재산업시설 현대화사업(이월) 기계 설치 및 준공    : 2023년 6월

◦ 2023년 목재산업시설 현대화사업 사업계획 변경승인 및 보조금 교부결정 : 2023년 6월

◦ 2023년 목재산업시설 현대화사업 추진 : 2023년 7월 ~ 10월

임 도 사 업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 산내중황, 대강사석, 산동대상, 이백효기

◦ 사 업 비 : 1,847백만원(국비 781, 도비 391, 시비 675)

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 간선신설5㎞, 작업신설1㎞, 구조개량 5㎞, 보수 13㎞, 임도관리원 2명 등

※남원시 임도 현황 : 38개 노선, 131.293km

□ 추진실적

구분	사업위치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	사업기간	비고
계		8.51	1,518
작업임도 신설사업	이백면 효기리 산 31번지 일원	0.86	135	2023년 5월 ~ 8월
간선임도	산동면 대상리 산 103번지 일원	1.34	450	2023년 5월 ~ 8월
	대강면 사석리 산 94번지 일원	0.80	200	2023년 5월 ~ 8월
	산내면 백일리 산 21-1번지 일원	1.82	450	2023년 5월 ~ 8월
임도구조개량사업	교룡산, 대산풍촌, 인월자래 등	3.00	164	2023년 4월 ~ 5월
임업경영기반시설 구조개량사업	주천면 덕치리 산 45번지 일원	0.11	119	2023년 5월 ~ 6월	사설임도 관리전환
	대강면 송대리 산 101번지 일원	0.10
	산내면 입석리 산 11-1번지 일원	0.48

□ 금후계획

◦ 임도 구조개량 및 보수사업 시행(2차)         : 2023년  6월 ~  9월

◦ 임도변 잡관목 및 풀베기 등 시행	: 2023년  6월 ~  9월

◦ 2024년 임도 신설사업 사전 설계              : 2023년 11월 ~ 12월

등산로 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 성적봉, 고리봉, 교룡산, 덕음산, 견두산, 만행산, 뒷밤재 등

◦ 사 업 량 : 18km

◦ 사 업 비 : 656백만원(도비 100, 시비 556) ※주민참여예산 356

◦ 사업기간 : 2023. 2월 ~ 11월

◦ 사업내용 : 데크 및 계단, 로프난간, 종합안내판, 방향표지판 설치, 잡관목 제거 등

※남원시 등산로(숲길) 현황 : 281㎞(등산로 237, 백두대간 등산로 44)

□ 추진실적

위치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	사업내용
계	3	400
성적봉	0.50	112	데크전망대 및 계단 설치, 방향안내판설치, 옥외용벤치 설치 등
고리봉	0.50	48	목계단 철거 및 (재)설치, 이정표 교체, 스토리텔링 안내상판 교체, 종합안내판 설치, 잡관목 제거
교룡산,만행산, 덕음산,견두산,뒷밤재	1.00	40	잡관목제거, 방향안내판설치, 종합안내판 설치 등
풍악산(주민참여예산)	1.00	200	통나무계단 설치, 난간로프 설치, 돌계단 설치 등

□ 금후계획

◦ 주민참여예산 숲길 조성사업 실시설계 용역 및 시행

- 주천면 구룡폭포 데크 연결공사 정비사업            : 2023년  5월 ~ 9월

- 주천면 노치마을 쉼터 조성사업                     : 2023년  5월 ~ 9월

◦ 등산로변 잡관목 및 풀베기 등 시행            : 2023년  6월 ~ 9월

◦ 등산로 현장 지속적인 모니터링(숲길등산지도사) : 상시

산림휴양치유마을만들기(전환)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 산내면 부운리 부운마을 일원

◦ 총사업비 : 500백만원(시비) ※균특(지방이양) 자율개발사업

- 2023년 사업비 : 460백만원

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2023년

◦ 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 주민역량강화사업 등

□ 추진실적

◦ 2022년 마을만들기 대상지구 예비계획 수립(농촌활력과)  : 2021년 10월

◦ 산림휴양치유마을만들기(산내부운) 추진계획 수립    : 2021년 10월

◦ 2022년 주민역량강화사업 추진                 : 2022. 5. 4. ~ 11. 30.

◦ 마을만들기 실시설계용역 시행                 : 2022. 6. 22.

- 부운마을 추진위원회 토지 매입 절차에 따른 중지

◦ 마을만들기 실시설계용역 재착수                : 2023년 5월

□ 쟁점 및 대책

◦ 부운마을 추진위원회 부지 확보지연에 따른 설계 지연으로 사업추진 어려움

□ 사업의 필요성 적극 설명 및 설계 등 추진위원회 독려를 통해 연내 사업 완료 추진

□ 금후계획

◦ 산림휴양치유마을 만들기 사업 시행	: 2023년 7월 ~ 12월

◦ 주민역량강화사업 시행	: 2023년 9월 ~ 10월

◦ 사업 완료 및 정산	: 2023년 12월

산림소득증대사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업대상 : 임업인 또는 생산자단체

◦ 사 업 량 : 임산물 상품화 지원사업 등 13개 사업

◦ 사 업 비 : 2,139백만원(보조 1,183, 자부담 956)

◦ 사업내용(2023년 본예산)

사 업 명	규 모 (개소)	사 업 비 (백만원)		사 업 내 용
임산물 상품화 지원사업 등 5개 국비사업	148개소	계	801	- 포장디자인개선, 포장박스 지원 - 생산장비(예취기, 선별기, 전지기 등) 지원 - 저장‧건조시설(저온저장고, 건조기 등) 지원 - 표고배지, 관수·관정, 자동화시설, 하우스, 감시시설 등) 지원 - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%(일반), 보조 60% 자부담 40%(공모)
		국비	359
		도비	132
		시비	310
백두대간 주민소득지원	22개소	계	133	- 대상자 <백두대간 보호지역 토지소유자 및 거주 주민> · 생산기반 조성(하우스, 관정 등) 지원 · 저장·건조·가공시설(저온저장고, 건조기 등) 지원 · 재원비율 : 보조 90% 자부담 10%
		국비	103
		도비	9
		시비	21
임업기계용 면세유 지원사업	14개소	계	10	- 산림조합 면세유류 공급대상자 - 지원단가 : 휘발유 166원/ℓ,경유 193원/ℓ
		도비	4
		시비	6
산림소득작물 재배지원사업 등 6개 자체사업	71개소	계	239	- 두릅, 산마늘, 곤달비, 고사리 종근/묘목 구입비 지원 - 표고재배농가대상 배지/자목구입비용 지원 - 왕대추 생산농가 영양제, 관정, 운반구, 자동개폐기 지원 - 고로쇠 채취농가 대상 호스, 집수통 교체비용 지원 - 산동 만행산(상신) 산촌생태마을 망원경 교체비용 지원 - 재원비율 : 보조 50% 자부담 50%
		시비	239

□ 추진실적

(2023.5.6.기준)

사 업 명		사 업 비(백만원)				내 용
		예산액	교부결정	집행액	미교부 잔액
계		1,903	1,639	370	264	245개소
산림작물 생산기반조성	생산기반조성	173	121	4	52	47개소 (예취기,선별기,전동가위 등 )
	친환경임산물	80	46	6	34	31개소(혼합유박, 퇴비, 토양개량제)
	생산단지조성 (소액)	250	223	10	27	33개소 (표고톱밥배지 , 표고하우스, 관정 , 대추비가림 시설 등)
산림작물 생산기반조성	생산단지조성 (공모) (사고이월)	462	462	239		권태환(조경수 컨테이너 시설 및 시설하우스) 유일환(버섯재배사)
	생산단지조성 (공모)	53	53	0	0	권태환(조경수 묘목 식재)
임산물 유통구조 개선	임산물상품화	119	94	31	25	20개소(포장박스, 디자인개발)
	유통기반조성	125	51	5	74	16개소(저온저장고, 화물차량 등)
백두대간 주민소득 지원사업	백두대간 주민소득	133	116	40	17	21개소 (저온저장고, 정제기, 건조기 등)
	백두대간 주민소득(공모) (사고이월)	270	270	0	0	1개소 (다온영농조합법인) 고사리, 고로쇠 저장·건조·가공시설 7월 초 준공 예정
산림소득작물 재배지원사업		67	58	8	9	32개소(참두릅, 산마늘, 곤달비, 고사리)
귀산촌인 산림소득작물 재배지원사업		13	9	0	4	1개소(참두릅, 산마늘, 곤달비, 고사리)
산림소득작물(표고배지, 자목) 재배지원사업		50	50	10	0	5개소(표고배지, 자목)
명품왕대추 고품질 육성화사업		38	26	7	12	24개소(관정, 영양제, 운반구, 자동개폐기)
고로쇠 채취호스 교체 지원사업		60	50	0	10	9개소(고로쇠채취 호스, 집수통)
산촌생태마을 망원경교체 지원사업		10	10	10	0	1개소(산촌생태마을 노후망원경 교체)

□ 금후계획

◦ 2022년 이월공모사업 완료 및 보조금 지급          : 2023년 7월

◦ 2023년 산림소득분야 보조사업 추가 사업대상자 모집 및 확정 : 2023년 7월

◦ 2023년 산림소득분야 보조사업 사업 시행 및 관리 감독      : 2023년 7월 ~ 8월

◦ 2023년 산림소득분야 보조사업 사업 완료 및 정산           : 2023년 8월 ~ 10월

백두대간생태교육장 관리 및 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉로 151, 운봉읍 행정공안길 299일원

◦ 시설현황 : 8개 시설

(단위 : 억원)

시설명	조성연도	규모	시설 내용	투 자 사업비	비고
계				382
체험·휴양시설	2014	210,545㎡ (건축 897㎡)	트리하우스 8동	67
전시관	2016	23,826㎡ (건축 5,160㎡)	전시관, 호랑이라이더, 써클 영상관 등	257
에코롯지	2017	8,389㎡ (건축 253㎡)	숙박 6동	8
국민여가 캠핑장	2017	8,063㎡ (건축 200㎡)	오토캠핑장 31면	20
힐링 캠핑장	2018	5,000㎡	캠핑장 6면	0.5
워터파크	2018	769㎡	물놀이시설	5
유아숲 체험원	2018	6,500㎡	야외체험 학습장	1.5
생물테마 전시관	2021	482㎡	4개실 (물고기,올빼미,곤충,특수동물)	23

◦ 인력 현황

- 전시관 운영 : 일반직 3명, 임기제 3명, 공무직 4명

- 숙박시설 운영 : 청경 7명, 공무직 2명

- 기타 시설관리 운영 : 기간제 근로자 10명(청소, 생물관리 등)

- 산림교육 운영 : 산림치유사 2명

◦ 운영 현황(최근 5년)

(2023. 4. 30. 기준)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	비고
인원 (명)	계	112,102	88,993	32,877	56,901	71,714	18,475
	유료	55,505	42,117	17,836	32,479	39,265	8,268
	무료	56,597	46,876	15,041	24,422	32,449	10,207
수입액(천원)		229,568	259,054	139,403	278,831	302,765	75,754

□ 추진 실적

◦ 시설별 방문객 및 수입현황

(2023. 4. 30. 기준)

구 분	계	전시관	체험·휴양시설		에코롯지	국민여가 캠핑장
			트리하우스	힐링캠핑장
방 문 객(명)	18,475	13,371	300	324	908	3,572
수입액(천원)	75,754	12,094	6,000	1,620	29,280	26,760

※ 숙박․캠핑장 현황 : 숙박 14동(에코롯지 6동, 트리하우스 8동)

캠핑장 37면(힐링캠핑장 6면, 국민여가캠핑장 31면)

◦ 백두대간생태교육장 특별기획전 및 소규모 행사 추진 : 2회

- 겨울방학 곤충 특별기획전

· 행사 기간 : 2022. 12. 20. ~ 2023. 2. 12.

· 행사 내용 : 곤충 콘텐츠 전시, 생태전문해설, 자생곤충 체험 등

· 행사 실적 : 방문객 9,833명(일 평균 방문객 대비 129% 증가)

- 5월 가정의 달 소규모 체험행사(추진 중)

· 행사 기간 : 2023. 5. 5. ~ 5. 29.

· 행사 내용 : 백두대간 자생생물 전시, 야외 체험행사(저브볼, 축구다트, 다람쥐통 굴리기 등), 춘향제 행정부스 운영 등

◦ 산림교육 프로그램 운영 : 2종

구 분	기 간	인력	사업비 (백만원)	내 용	비 고
산림치유	2023. 4. ~ 11.	2명	57	․ 대상 : 방문객 및 남원시민 ․ 장소 : 백두대간 체험휴양시설 ․ 스트레스 제로 등 9개 프로그램	직영
유아숲	2023. 4. ~ 11.	3명	86	․ 대상 : 관내 유아기관 및 가족 등 ․ 장소 : 백두대간 유아숲 체험원 ․ 자연과 교감할 수 있는 유아교육 프로그램 9개 운영	민간위탁

□ 쟁점 및 대책

◦ 백두대간 생물테마시설 해외 생물 수입 지연에 따른 개관 일정 지연

□ 현재 생물테마시설 생물 입식률은 98%로 입식 예정인 맹금류(올빼미)를 제외하고 하반기 중 임시개관 추진

※ 생물테마시설 생물 현황 : 21종 797마리(입식 계획 27종 809마리)

□ 맹금류 입식 생물 수입업체 및 환경과와 협력하여 조속한 입식 추진

□ 금후계획

◦ 백두대간생태교육장 체험프로그램 및 소규모 행사 운영 지속 추진 : 계속

- 전시관 활성화 : 곤충표본 만들기, 자개거울 만들기, 특별전 등

- 산림교육 운영 : 유아숲 체험원 및 산림치유, 숲 해설 프로그램 운영

◦ 백두대간생태교육장 물놀이장 개장 추진 :‘23. 7. 1. ~ 8. 31.

◦ 생물테마전시체험시설(에코큐브) 운영 및 임시 개관 추진 : 하반기 중

- 프로그램 : 실별 전문해설, 생물활용전시체험, AR나비체험, 먹이주기 체험 등

- 정식 개관을 위한 생물테마전시체험시설 관리 및 운영 조례 제정

- 미입식 생물 조속한 입식 추진(환경과 협조)

백두대간 숲속 워케이션 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍 운봉로 151 일원(백두대간생태교육장 전시관)

◦ 사 업 량 : 1식(조성 면적 978㎡)

◦ 사 업 비 : 900백만원(도비 540, 시비 360) ※지방소멸기금

◦ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 워케이션 공간(원격근무시스템, 쉼터), 유아 실내놀이터 조성 등

□ 추진실적

◦ 지방소멸대응기금 국비 확보(시비 전환)	: 2022. 8. 31.

◦ 도청 지방소멸기금 공모사업 선정	: 2022. 10. 27.

◦ ‘22년 3회 추경 예산 편성	: 2022. 12. 23.

◦ 타지역 키즈카페 벤치마킹 실시(2회)	: 2023. 2. 28./3. 2.

◦ 백두대간 숲속 워케이션 조성사업 추진계획 수립	: 2023. 3. 24.

◦ 협상에 의한 계약 타당성 검토(감사실, 재정과)	: 2023. 5. 8.

□ 쟁점 및 대책

◦ 워케이션 및 키즈존 조성과 연계한 백두대간생태교육장 활성화 방안 강구

□ 백두대간생태교육장 자원(전시관, 숙박시설, 캠핑장 등)과 연계 시너지 효과를 창출 할 다양한 컨텐츠 구성과 편의시설, 놀이시설 조성으로 방문객 증대 도모

□ 금후계획

◦ 입찰공고 및 제안서 평가 실시	: 2023. 5월

◦ 사업자 선정 및 사업 시행	: 2023. 6 ~ 11월