2023. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

도   시   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 남원시 미래 도시디자인 마스터플랜 수립 용역

◦ 장기미집행 도시공원 내 사유지 매입

◦ 어린이공원 새단장 조성사업

◦ 금암공원 조성사업

◦ 만인공원 조성사업

◦ 교룡공원 숲속야영장 조성사업

◦ 쾌적한 도시공원 유지관리

◦ 미세먼지 차단숲 조성사업

◦ 생활밀착형 숲 조성사업

◦ 함파우 지방정원 조성사업

◦ 도시숲 및 가로수 조성사업

◦ 2040 도시기본계획 및 관리계획(재정비)

◦ 구암지구 도시개발사업

◦ 도시재생 지원센터 현황

◦ 도시재생 거점시설 운영

◦ 터미널지구 도시재생 뉴딜사업

◦ 도시재생 인정사업(구.미도탕)

◦ 도시재생 활성화 계획 수립

◦ 생활밀착형 도시재생 스마트 기술지원사업

□ 시정질문·5분발언 추진상황

일  반  현  황

□ 기    구

										도 시 과 장
										박 승 용
도시디자인 담당											도시관리 담당													도시재생 담당
강 자 청											성 월 계													김 상 규
∘ 도시디자인 마스터플랜 수립 ∘ 도시공원 조성 사업추진 ∘함파우지방정원 ∘도시숲·가로수 조성 ∘미세먼지 차단숲· 옥상정원조성 ∘ 장기미집행 사유지 매입 ∘ 경관·공공디자인 관리 ∘도시공원 유지관리											∘도시기본·관리 계획수립 ∘도시계획시설 결정및인가 ∘ 지구단위계획 수립 ∘개발행위허가 ∘전문건설업관리													∘도시재생뉴딜사업 ∘도시재생인정사업 ∘ 도시재생 전략 계획수립 ∘ 도시재생 활성화 계획 수립 ∘도시재생예비사업 ∘ 도시재생지원센터 운영

□ 인    력

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	16	1	1	3	5	4	2
현 원	16	1	1	4	5	-	5	공무직 2 휴직자 2
증 감	-	-	-	1	-	△ 4	3

2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦ 도시디자인의 입체적인 미래상 구현과 실질적인 가이드라인 지침 수립 ◦ 주민 중심의 쾌적하고 안전한 도시공간 조성 및 공공디자인 프로세스 정립 및 추진 ◦ 도시관리계획 변경 및 지속 발전 가능한 도시개발사업 추진 ◦ 지속적인 도시재생사업을 통한 구도심 활성화 및 지역주민 삶의 질 제고

□ 다양한 숲, 정원, 공원과 디자인이 어우러진 녹색도시 구현

◦ 기후대응 광치천 미세먼지 차단숲 조성 (2㏊ / 메타세콰이어 외 27종 51,302주)

◦ 함파우 지방정원(11㏊) 추진으로 관광지 연계 및 정원문화 확산 기여

◦ 역사와 충혼의 만인공원 행정절차 이행, 부지 매입비 등 예산확보(109억)

◦ 미래 도시디자인 가이드라인 수립 추경 확보(9억) 및 제안 공모 추진

◦ 도시공원 활성화 지원 시범사업 공모선정 *전북 3개소(전주,익산,남원)

- 도통근린공원 맨발걷기길 조성 : 도비 60백만원(‘23. 3월)

□ 보존과 개발이 조화를 이루는 도시관리계획 수립 및 정비

◦ 남원 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비로 체계적 도시 공간구조 마련

◦ 제15대 남원시 도시계획위원회 구성(도시계획심의 및 자문 역할)

- 23명 (전체 23, 1분과 9, 2분과 9, 3분과 9)

◦ 건전한 도시 성장과 난개발 예방을 위한 도시개발 추진

- 도시관리계획 추진 8건

(도시계획시설 4, 용도지구 3, 국립공원구역 해제에 따른 변경 1)

- 남원 구암지구 도시개발사업 추진

- 도시계획 심의(1분과위원회) 및 개발행위허가 : 4회 137건

(태양광 발전시설 117, 동·식물 관련 시설 15, 기타 5)

□ 구도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진

◦ 도시재생사업 공모 대응을 위한 활성화 계획 수립

- 금동 노후주거지 공모 신청서 제출(`23.04.25.) 완료

- 동문밖마을 하반기 공모 신청 예정(일정 미정)

◦ 주민들의 역량 강화를 위한 S/W사업 추진

- 터미널지구 4과목, 인정사업 3과목, 동문밖마을 1과목

◦ 거점공간 조성사업(H/W) 추진

- 공사중 : 남원이음센터, (구)미도탕

- 설계중 : 숲정이 마을 공유마당, 상생협력상가

◦ 생활밀착형 도시재생 기술지원사업을 통한 구도심 활성화 도모

- 원도심지구 사업 착공(`23.05.02.) 및 터미널지구 설계 착수(`23.04.21.)

	하반기 추진방향
◦ 지속가능한 도시발전을 위한 미래 도시디자인 마스터플랜 용역 본격 추진 ◦ 만인공원 사전용역(문화재, 기본계획 등), 금암공원·숲속야영장 조성 완료(개장 준비) ◦ 도시숲·가로수 조성(6건) / 옥상정원, 함파우 지방정원 차질 없는 사업추진 ◦ 지속발전 가능한 도시발전을 위한 도시관리계획 마련 - 2030 도시관리계획(재정비) 수립으로 체계적인 개발과 도시관리 기본틀 마련 (전라북도 도시계획위원회 심의 추진) - 구암지구 도시개발사업 추진으로 도시 관문 역할 도모 - 개발사업의 적정성 검토를 위한 도시계획위원회 운영 철저(월 1회) - 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 ◦ 주민의 삶의 질 향상 및 도시활성화를 위한 지속가능한 도시재생사업 추진 - 도시재생사업 신규 공모사업 적극 대응 ․ 동문밖마을(하반기 신청예정), 금동노후주거지(7월 최종 선정 예정) - 사업계획 변경을 통한 원활한 사업추진 ․ 터미널지구 및 도시재생 인정사업(변경내용 : 사업기간 연장) - 주민역량강화(S/W), 거점공간조성(H/W) 등 도시재생사업 지속 추진

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

남원시 미래 도시디자인 마스터플랜 수립 용역

(신규사업)

□ 개    요

◦ 용 역 명 : 남원시 미래 도시디자인 마스터플랜 수립 용역

◦ 위    치 : 남원시 도시지역(30.65㎢)

◦ 과업내용 : 미래 도시디자인 마스터플랜 용역 1식

※ 도시경관, 공공디자인, 녹지, 도시공원 및 도시숲, 가로수 관리계획 등

◦ 용 역 비 : 1,000백만원(시비)

◦ 용역 기간 : 착수일로부터 8개월

◦ 용역발주방식 : 협상에 의한 계약 – 제안서 평가(정량+정성)를 통한 업체 선정

□ 추진 실적

◦ 23년도 제1차 추경 편성 관련 학술연구용역심의	: 22. 2. 15.

◦ 협상에 의한 계약 타당성 검토(감사실, 재정과)완료	: 23. 4. 16.

◦ 일상 감사 및 원가심사 의뢰(감사실)	: 23. 4. 24.

◦ 남원 미래도시디자인 마스터플랜 수립용역 시행	: 23. 5. 04.

- 제안 공모 공고 : 23. 5. 04. ~ 5. 24.(20일)

◦ 입찰 등록 및 제안서 접수	: 23. 5. 24.

◦ 제안서 평가 및 협상 적격자 통보·협상                 : 23. 5. 30. ~

□ 금후 계획

◦ 계약체결 및 용역 착수(협상 성립 후 10일 이내)    : 23. 6. 10. 이후

장기미집행 도시공원 내 사유지 매입

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대    상 : 근린공원 6개소(금암, 월락, 향교, 교룡, 신촌, 노암)

◦ 면    적 : 2,172천㎡ (사유지 1,288천㎡, 국・공유지 884천㎡)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년(8년)

◦ 사 업 비 : 26,000백만원(시비)  *23년 예산 : 14,000백만원

□ 추진 실적

(단위: 백만원)

구 분	지정면적(㎡)	소유별(㎡)		매입현황(㎡)			비 고
		국공유지(필지)	사유지(필지)	기매입(필지)	23년(필지)	금액
계	2,172,324	883,610(261)	1,288,714(601)	538,521(138)	20,893(4)	604	43%
향교공원	486,786	217,932(68)	268,854(134)	87,994(45)	18,110(2)	409	39%
교룡공원	1,405,206	576,039(149)	829,167(378)	406,314(64)	2,585(1)	182	49%
월락공원	64,054	3,496(17)	60,558(22)	8,098(4)	-	-	13%
노암공원	108,114	12,487(14)	95,627(35)	11,987(3)	198(1)	13	13%
금암공원	38,257	19,988(7)	18,269(24)	16,734(21)	-	-	92%
신촌공원	69,907	53,668(6)	16,239(8)	7,394(1)	-	-	46%

□ 금후 계획

◦ 장기미집행 도시공원 사유지 매입 지속 추진         : 23. 06 ~ 12.

어린이공원 새단장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 어린이공원 12개소

◦ 사업내용 : 새단장(바닥정비, 퍼걸러, 수목정비, 노후시설 교체 등)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2024년

◦ 사 업 비 : 2,000백만원 / `23년 예산 : 200백만원(시비)

□ 추진 실적

◦ ‘18 ~ ‘22년 사업현황

조성 년도	공원명	위치	사업비 (백만원)	사업내용
계			1,600
‘18년	도통3호 어린이공원	용성중 옆	100	탄성포장 400㎡, 수목식재, 블록포장 140㎡ 등
	도통7호 어린이공원	도통동주민센터 옆	100	탄성포장 410㎡, 콩자갈포장 112㎡ 등
	도통6호 어린이공원	물방개 워터파크	700	탄성포장 939㎡, 물놀이시설 (11종)
‘19년	향교4호 어린이공원	중앙초 옆	20	야자매트 61㎡, 수목식재 등
	도통1호 어린이공원	시청북문	90	탄성포장 384㎡, 수목식재 등
	도통2호 어린이공원	녹주맥반석 옆	90	탄성포장 455㎡, 수목식재 등
‘20년	향교1호 어린이공원	덕인회관 옆	60	탄성포장 262㎡, 수목식재 등
	도통5호 어린이공원	예닮교회 앞	140	탄성포장 186㎡, 수목식재, 데크설치 29㎡
‘21년	노암1호 어린이공원	노암5통	60	옥외용벤치 교체, 수목식재 등
	도통4호 어린이공원	도통초 옆	140	탄성포장 331㎡, 수목식재, 화장실신축 등
‘22년	주천 송치, 이백 서곡	문화마을내	100	그네 1대, 철봉 1대, 수목 식재, 비가림시설 등

◦‘23년 실시설계용역(의견수렴 등)               : 23. 03 ~ 06.

- 5개소(도통 1~3호, 향교 1호, 4호) : 조합놀이대 교체, 맨발길 조성, 수목보완 등

□ 금후 계획

◦ 새단장 사업 착공                             : 23. 06.

◦ 새단장 사업 준공                              : 23. 09.

금암공원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 566-1번지 일원

◦ 사업내용 : 야간경관이 특화된 가족생태 근린공원조성

- ［1단계］주민생활과 밀접한 근린생활시설 /‘20~‘22년 (70억)

- ［2단계］공원 이용활성화를 위한 관광객 유인시설 /‘22~‘23년 (32억)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2023년 (6년)

◦ 총사업비 : 115억원(매입비 10, 용역비 3, 공사비 102)

□ 추진 실적

◦ 1단계 사업완료	: `20. 04. ~`22. 06.

·(전기) : 금수정 및 수목 경관조명, 인도교조명, 가로등설치 등

·(조경·토목) : 인도교, 데크산책로, 생태놀이터, 종탑·우물 복원, 쉼터, 화장실 등

◦ 2단계 사업추진중	: `22. 06. ~ 현재

·(조경·토목) : 놀이터 녹음수 등(느티, 에메랄드 그린 외 1종 56주), 수국 2.1만주 등

무장애 데크로드, 주차장 진입로 포장, 침목계단, 수로관 설치 등

· (건축) : 까페전망대 59.98㎡ 완료, 운영 위탁자 선정 예정

· (전기) : 종탑·중앙계단, 옹벽, 진입 데크로드, 전망대, 인도교 종점부,                 벽천 경관조명 LED 184EA

□ 금후 계획

◦ 금암공원 조성사업 사업(2단계) 추진             : `23. 07. ~ `23. 11.

◦ 가을철 수국 보완사업 및 까페전망대 운영        : `23. 08 ~

만인공원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1번지 일원

◦ 사업내용 : 만인공원 조성

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2027년

◦ 총사업비 : 30,441백만원(국비 3,887 시비 26,554)

□ 추진 실적

◦ 코레일 소유 토지매입(1필지, 19,001㎡) 협의       :‘22. 08 ~‘23. 02

◦ 공원 구역조정(51,300㎡⇒약90,246㎡) 행정절차 이행 :‘22. 12 ~ 현재

- 도시관리계획 결정(변경), 공원조성계획(변경), 환경성·교통성·경관성 검토, 재해영향성검토    ◦ 만인공원 조성 관련 1회 추경예산 확보(109억)       :‘23. 03.

- 마스터플랜(문화예술과), 문화재조사, 철거공사, 기본계획 및 실시설계용역

□ 금후 계획

◦ 문화재 지표조사 용역                            :‘23. 06. ~

◦ 철도공사 부지 매각 협의                        :‘23. 06. ~

◦ 기본계획, 철거공사 실시설계용역, 행정절차 이행   : ‘23. 06. ~

교룡공원 숲속야영장 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 산곡동 산13번지 일원

◦ 면    적 : 28,069㎡

◦ 사업내용 : 일반야영장 29면, 글램핑돔 3동, 산책데크, 부대시설, CCTV 등

◦ 사업기간 : 2021 ~ 2023년 (3년)

◦ 총사업비 : 2,400백만원(국비 1,200, 시비 1,200)

□ 추진 실적

◦ 숲속야영장 기본계획 및 실시설계용역                   :‘21. 01. ~‘21. 09.

◦ 캠핑동호회 의견수렴(한국캠핑협회 외 2개 동호회)        :‘21. 05.

◦ 숲속야영장 제반용역 및 관련부서 협의                  :‘21. 05. ~‘22. 03.

◦ 숲속야영장 조성계획 승인, 고시(전라북도)                :‘22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업 조성사업(조경·토목) 착공          :‘22. 05.

◦ 숲속야영장 조성사업 조성사업(전기·통신) 착공          :‘22. 11.

□ 금후 계획

◦ 숲속야영장 조성사업 공사 시행(공정율 60%)           :‘23. 07. ~‘23. 10.

- 소나무정비, 사이트 부지조성, 옹벽블록, 파고라 설치, 수목식재 등

◦ 운영관리 조례 제정, 운영방식(직영, 위탁) 검토   :‘23. 07 ~

쾌적한 도시공원 유지관리

(계속사업)

□ 개    요

◦ 대상공원 : 교룡공원 외 22개소

◦ 사업내용

- 등산로변 예초(교룡, 신촌, 향교공원 / 13㎞)      :  30백만원

- 등산로 정비(신촌공원 외 3지구)                 :  50백만원

- 시설물 및 수목유지관리(근린·어린이공원 / 23개소)  : 180백만원

- 도통14통 근린공원 내 탄성포장                  :  30백만원

- 맨발 황토길 조성(도통근린공원)                  : 150백만원

◦ 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 440백만원

□ 추진 실적

◦ 등산로 정비 실시설계 완료, 정비사업 착공        :‘23. 04. / 05.

◦ 맨발길 조성, 탄성포장 등 실시설계 용역, 착공     :‘23. 04. ~ 05.

◦ 공원 시설물도색·교체, 수목해충방제              :‘23. 04. ~ 06.

◦ 근린공원, 어린이공원 수목관리(제초, 풀베기, 수목전정)  :‘23. 05. ~ 06.

◦ 등산로 예초작업(교룡, 향교공원, 신촌공원)         :‘23. 05. ~ 06.

□ 금후 계획

◦ 공원 내 수목, 녹지대, 시설물 유지관리            :‘23. 06. ~ 12.

미세먼지 차단숲 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 광치천변(용정동 산101-4번지 일원)

◦ 사 업 량 : 2.0ha

◦ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 1,000 시비 1,000)

◦ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

◦ 사업내용 : 메타세콰이어 외 27종 51,302주 식재, 퍼걸러 2개소 등

※ 산림청 권장 미세먼지 저감 조림수종 (76종), 조달청 고시 조경수목(246종), 지표면 피복수종(70종) 중 선정

□ 추진 실적

◦ 사업계획 수립                              :‘22. 1. 26.

◦ 지방재정 투자심사 승인                     :‘22. 3. 8.

◦ 실시설계 용역 시행                        :‘22. 5. 2. ~ 10. 28.

◦ 원가심사 및 일상감사 완료                 :‘22.10. 20.

◦ 사업시행 및 준공                          :‘22.11.10. ~‘23. 6. 2.

□ 금후 계획

◦ 급수, 시비, 제초 등 사후관리 철저          : 계속

생활밀착형 숲 조성사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 동충동 231-1 (남원시 청소년수련관)

◦ 사업규모 : 850㎡

◦ 사 업 비 : 500백만원(국250 시250)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 옥상정원 및 실내정원조성

□ 추진 실적

◦ 생활밀착형 숲 조성사업 신청서 제출               :‘22. 5. 30.

◦ 사업대상지 선정                                  :‘22. 8. 30.

◦ 대상지 변경 승인신청(전라북도)                    :‘23. 5. 17.

□ 금후 계획

◦ 실시설계                                          :‘23. 6. ~ 8월

- 구조안전성 검토 및 생활밀착형 숲 조성 지침 반영

◦ 사업 시행                                        :‘23. 8. ~ 11월

◦ 사후관리                                         : 계속

함파우 지방정원 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 노암동 산13번지 일원

◦ 조성면적 : 40,638㎡(구역 면적 11.3ha)

◦ 사 업 비 : 6,533백만원(도비 3,000 시비 3,533)  ※ 토지매입비 533백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	6,533		6,533		500	2,533	600	2,900
국비
도비	3,000		3,000		250	1,000	300	1,450
시비	3,533		3,533		250	1,533	300	1,450

□ 추진 실적

◦ 용역추진상황

용 역 명	사업기간	사업비(백만원)	비 고
계		803
기본 및 실시설계	2020. 9. 3. ~ 2021.12.15.	475	완료
문화재 지표조사	2020.12.22. ~ 2021. 5.14.	6	완료
문화재 표본조사	2021. 6. 7. ~ 2021.11. 5.	17	완료
산림조사	2021. 8.30. ~ 2021. 9.16.	6	완료
사전재해영향평가	2021. 3.23. ~ 2022. 4.17.	66	완료
소규모환경영향평가	2021. 3.23. ~ 2022. 6.21.	38	완료
환경영향평가	2022. 5.19. ~ 2022.12.31.	134	완료
사후 환경영향 조사	2023. 4. 19. ~ 2024. 4. 19.	61	추진중

◦ 함파우지방정원 경관심의                             :‘21. 9. 14.

◦ 유원지 조성계획 변경(남원시 고시 제2021-150호)      :‘21. 10. 1.

◦ 실시계획인가신청 및 관련부서 협의                   :‘21. 12. 20.

- 협의완료 : 문화예술과, 건설과, 안전재난과, 건축과, 상수도사업소, 농정과 등

◦ 환경영향평가 용역 시행                     :‘22. 5. 19. ~ 12. 29.

- 환경영향평가서(초안) 주민설명회 개최               :‘22. 7. 28.

- 환경영향평가 협의 완료                            :‘22. 12. 29.

◦ 원가심사 및 일상감사 완료                          :‘22. 11. 28.

◦ 함파우 지방정원조성사업(토목․조경) 시행  :‘22.12. 27. ~‘24. 3. 17.

◦ 사후환경영향조사 용역 시행              :‘23. 4. 19. ~‘24. 4. 12.

◦ 함파우 지방정원 조성사업(전기․통신공사) 시행         :‘23. 4. 24.

□ 금후 계획

◦ 함파우 지방정원 조성사업(토목․조경) (2차분) 시행      :‘23. 12월

도시숲 및 가로수 조성사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도시숲 1.0ha, 가로수 조성 10.5㎞

◦ 사 업 비 : 1,600백만원(도비 800, 시비 800)

◦ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12월

◦ 사업내용 : 경관개선, 공간활용성을 고려한 도시숲 및 가로수 조성

위 치		사업량	예산액	비고
합 계		1.0ha/10.5㎞	1,600
도시숲	소 계	1.0ha	700
	금지면 옹정리 309-2번지 일원	0.3	300	금지문화누리센터
	금지면 옹정리 301-3번지 일원	0.4	200	김주열열사 기념관
	덕과면 사율리 652-8번지 일원	0.3	200	덕과면 소재지 앞 유휴지
가로수	소 계	10.5㎞	900
	인월면 서무리 95-5 ~ 취암리 65-4	2.5	200	인월면 풍천
	주생면 도산리 5-15 ~ 금지면 입암리 1140-10	3.0	300	주생면 – 금지면 풍촌천
	요천 100리숲길(산동~금지)	5.0	400	기존 수목 보식

□ 추진 실적

◦ 23년 도시숲 조성사업 대상지 선정              :‘22. 11. 22.

◦ 사업계획 수립                                :‘23. 1. 3.

◦ 도시숲 및 가로수 실시설계 용역               :‘23. 1. 31.~ 3. 21.

◦ 도시숲 위원회 심의                           :‘23. 4. 4.

◦ 가로수 조성사업 일상감사                     :‘23. 4. 6. ~ 4. 13.

◦ 가로수 조성사업 시행                         :‘23. 4. 27. ~ 7. 2.

◦ 대상지 변경 승인신청(전라북도)                :‘23. 5. 19.

◦ 도시숲 조성사업 일상감사 및 원가심사         :‘23. 5. 19.

□ 금후 계획

◦ 사업시행 및 준공                              :‘23. 4. ~ 11월

◦ 사후관리                                      : 계속

2040 도시기본계획 및 관리계획(재정비)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 사 업 범 위 : 남원시 행정구역 전체

◦ 사 업 기 간 : 2019 ~ 2023년

◦ 사 업 내 용 : 도시기본계획, 도시관리계획(재정비) 등

◦ 총 사 업 비 : 1,444백만원

□ 추진 실적

< 도시기본계획 수립>

◦ 기초조사 및 현황분석 (시민참여단 운영 4회)	:‘19. 07. ~ 12.

◦ 도시기본계획 입안보고	:‘20. 08. 20.

◦ 주민의견 수렴(공청회) 개최	:‘21. 03. 18.

◦ 시의회 의견청취	:‘21. 03. ~ 04.

◦ 남원시 관련부서 협의	:‘21. 05.

◦ 남원시 도시계획위원회 자문	:‘21. 08. 10.

◦ 도시기본계획 승인신청(남원시 → 전라북도)	및 관계기관 협의

:‘22. 10.

◦ 국토정책위원회(국토계획평가) 심의완료	:‘23. 03.

◦ 전라북도 재해영향평가 심의완료	:‘23. 04.

< 도시관리계획 수립>

◦ 기초자료 및 관련자료 수급, KLIS 등재사항 검토 및 정비 등

◦ 장기미집행시설 전수 조사 및 관련도서 작성	:‘19. 08. ~ 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(1차/2차)	:‘20. 07. / 12.

◦ 일몰제에 따른 장기미집행시설 실효고시(3차)	:‘22. 02.

◦ 도시관리계획(재정비) 입안, 의견청취, 의회의견청취	:‘22. 03. ~ 04.

◦ 도시관리계획(재정비) 관계기관(부서) 협의	:‘22. 04.

◦ 남원 도시계획위원회 자문 및 심의	:‘22. 05. 23.

◦ 남원 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시	:‘22. 06. 17.

◦ 관계기관 협의(전라북도, 환경청, 산림청 등)	:‘22. 06. ~ 12.

□ 금후 계획

< 도시기본계획 수립>

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의	:‘23. 06.

< 도시관리계획(재정비)>

◦ 도시관리계획 승인신청(남원시 → 전라북도)	:‘23. 06.

◦ 전라북도 도시계획위원회 심의 및 승인	:‘23. 07.

도시기본계획

◇ 미 래 상 : 남원에 머무는 모두가 시민이 되는 오고싶고 살고싶은 “문화관광도시 남원”

◇ 계획인구 지표 설정

구분		2020	2025	2030	2035	2040	비고
			1단계	2단계	3단계	4단계
통계청 인구추계	남원시	77,539	75,871	74,790	74,162	73,924
	105% 적용시	81,416	79,665	78,530	77,870	77,620
상주 인구(계획인구)		82,045	79,915	79,082	78,444	77,858
주간 활동 인구(체류인구)		15,236	16,184	17,145	18,084	18,994
인구지표(안) (총괄)	총계	97,281	96,099	96,227	96,528	96,852
	최종적용	97,000	96,000	96,000	97,000	97,000

※ 인구의 지속적 감소 및 유출에 대응하기 위해 관광체류형 인구 지표 수립 반영

	도시관리계획(재정비)
◇ 시간적 범위(기준년도 / 목표연도) : 2020년 / 2030년 ◇ 공간적 범위 : 남원시 행정구역 일원(752.81㎢) ◇ 내용적 범위 : 용도지역, 용도지구, 지구단위계획, 성장관리계획, 도시계획시설 결정(변경) - 전라북도 결정사항 : 78건 / 용도지역(68지역), 용도지구(10지구) - 남 원 시 결정사항 : 120건 / 용도지구(33지구), 지구단위계획(1지구), 성장관리계획(1지구), 시설(84개소)

구암지구 도시개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위  치 : 전북 남원시 향교동, 도통동 일원

◦ 시행자 : 한국토지주택공사

◦ 사업방식 / 사업비 : 환지방식 / 406억원

◦ 토지이용계획(안)

구 분	계	공동주택	단독주택	준주거시설	공공청사	비고
토지이용	171,702.5㎡	67,336㎡	11,111㎡	5,860㎡	19,081㎡	도로,공원, 녹지,저류지 등 (68,314㎡)
수용인구·세대수		2,807인 / 1,080세대

※ 토지소유자 128명(주민대표 8명)

□ 추진 실적

◦ 도시개발구역 지정 제안(수용 및 사용방식)	: `17. 09. 01.

◦ 사업방식 전환에 따른 구역지정 제안(환지방식)	: `18. 04. 20.

◦ 구역지정 및 개발계획 승인(남원시↔전북도)	: `18.12.31. ~ `19.05.30.

◦ 법원부지 매각관련 선수협약 체결(LH↔법원,검찰청)	: `20. 06. 18.

◦ 구역지정(변경) 및 개발계획(변경) 고시(남원시↔전북도)	: `20. 08. 14.

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 08. 21.

◦ 환지계획 관련 토지평가위원회 개최(2회)	: `20.10.14 / 12.16.

◦ 문화재 시굴조사 추진	: `20.12.14 ~ `21.06.

◦ 토지이용계획 변경(2차) 추진 및 승인	: `21. 02. ~ 10.

◦ 문화재 정밀발굴조사 추진(중층발굴, 4구역 추가발굴)	: `21. 07. ~ `23. 06.

◦ 실시계획 변경 인가 고시(1차)	: `22. 02. 25.

◦ 문화재 보존방안 수립 완료(1·2구역) / 문화재청	: `22. 09. 21.

◦ 문화재 유적 전문가 검토 조치(3구역) / 문화재청	: `22. 12. 07.

□ 금후 계획

◦ 공사추진(LH)(개발계획, 실시계획인가 병행 추진)	: `23. 07. ~ `27. 12.

도시재생 지원센터 현황

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2016년 ~ 도시재생사업 종료 시

◦ 운영예산 : 360백만원 (인건비, 일반운영비 등)

◦ 직원현황 : 총7명(센터장 1명, 팀장 2명, 팀원 3명, 공석 1명)

◦ 담당업무 : 주민역량강화사업, 거버넌스(주민협의체 등) 운영관리, 사업홍보 등

□ 추진 실적

◦ 도시재생대학 운영 중 : 8과목 92명 수료 중

(인정사업 3과목 37명/동문밖마을 1과목 15명/터미널지구 4과목 40명)

◦ 주민 간담회 : 금동지구(3회/ 약 36명 참석), 동문밖마을(2회/ 약 22명 참석), 나우원(4회/ 41명 참석)

□ 금후 계획

◦ 주민역량강화 사업 추진 : 도시재생대학, 도시재생한마당 등

◦ 도시재생 거버넌스 운영 관리(주민간담회), 전담인력워크숍(월 1회)

◦ 활성화계획 수립 대응 : 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 2023 상반기 도시재생대학 성과공유회 추진(5.20)

- 터미널지구, 도시재생 인정사업

◦ 나우원 사업화 지원(사회적 경제조직 설립지원)

◦ 전북형 청년마을만들기 사업 추진 지원

◦ 도시재생 거점시설 운영 관리 지원

- 거점시설 : 빨간벽돌, 사랑나눔어울림센터, 청년창업공간(2개소) 등

도시재생 거점시설 운영

(계속사업)

□ 개    요

◦ 운영기간 : 2022. 01. ~

◦ 사 업 비 : 40백만원(운영 및 유지관리비)

◦ 거점시설

시 설 명	위 치	면적	비고
커먼스페이스	하정동 59-1번지(빨간벽돌)	대지 506㎡ 연면적 197.6㎡	준공(`20)
사랑나눔어울림센터	동충동 208-1번지 일원(구.북부시장)	대지 2,160㎡ 연면적 925㎡	준공(`22)
창업공간	하정동 56-1번지(한옥군)	대지 328㎡ 연면적 94.5㎡	준공(`21)
	하정동 53-1번지(구.부채박물관)	대지 212㎡ 연면적 241.7㎡	준공(`21)

□ 추진 실적

◦ 커먼스페이스 및 청년창업공간(나우원) 입주 및 운영 :‘22. 01. ~

입주공간	상호(대표)	사업아이템	비고
창업공간	고샅(오종하)	카페(제철특산물 활용)	한옥군
	추냔이네(김민화)	남원 굿즈 편집샵
	㈜도킹씨네마떼끄(김형준)	영화 및 문화 체험공간조성	구) 부채박물관
커먼스페이스	Red Bricks Studio(최한범)	음악과 영상기반 콘텐츠 제작 및 교육	빨간벽돌

◦ 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최(3회)           : `22. 04. ~ 10.

※ NOWWON[(주)도킹씨네마떼끄 외 3팀] 자체 행사 추진

◦ 동충동 자치사랑방 프로그램 운영(사랑나눔어울림센터) : `23. 01. ~

◦ 도시재생지원센터 이전(사랑나눔어울림센터)      : `23. 02. 06.

◦ 전북형 청년마을만들기 사업 선정 및 추진       : `23. 05. ~ 12.

□ 금후 계획

◦ 나우원(NOWWON) 페스티벌 개최 예정(2회)      : `23. 09. ~ 11.

◦ 나우원 사회적 경제조직 설립                   : `23. 12.

터미널지구 도시재생 뉴딜사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 동충․죽항동 일원(시외버스터미널주변 A=14만㎡)

◦ 사업내용 : 이음센터․숲정이마을 공유마당․상생협력상가 조성,

골목길개선사업(포켓주차장,마을쉼터 등), 주민역량강화사업 등

◦ 사업기간 : 2019 ~ 2023년 (5년)

◦ 사 업 비 : 14,722백만원(균특 8,500, 도비 1,416, 시비 4,806)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	14,722	11,370	3,352	0	0
균 특	8,500	6,490	2,010	0	0
도 비	1,416	1,081	335	0	0
시 비	4,806	3,799	1,007	0	0

□ 추진 실적

◦ 숲정이마을 공유마당 실시설계용역 착수                 : `21. 12. 10.

◦ 상생협력상가 설계용역 착수                            : `22. 01. 18.

◦ 남원 이음센터 조성사업 착공                           : `22. 03. 02.

◦ 도시재생 활성화계획 변경 용역 시행                    : `22. 09. 13. ~

◦ 주민역량강화사업 (상반기 뉴딜아카데미 4과목, 수강40명) : `23. 03. ~ 06.

□ 금후 계획

◦ 활성화계획 변경                                   : `23. 06.

◦ 숲정이공유마당 및 상생협력상가 착공               : `23. 08.

◦ 이음센터 준공                                     : `23. 08.

◦ 주민역량강화사업(뉴딜아카데미)                     : ~ `23. 12.

남원 도시재생 뉴딜사업(터미널지구) 총괄사업계획표

사업명	사업내용	사업비 (백만원)	추진상황	비 고
계	6개 사업	14,722
골목길 경관개선	터미널주변 골목길 개선 포켓주차장 마을쉼터	1,013	바닥포장 완료 벽화, CCTV·가로등설치 마을쉼터 및 포켓주차장 조성	사업 완료
숲정이마을 공유마당	마을쉼터 주민편의시설 커뮤니티공간 등 (연면적 2,199㎡,5층)	2,899	철거공사 완료 설계공모 완료 실시설계용역 추진	설계중 공정율:80%
남원이음센터	마을카페 교통회관 전북동부 아동보호 전문기관 전북대학교 남원발전연구원 공영주차장 등 (연면적 : 1,914㎡,3층)	7,985	설계완료 공사 진행 중	공사추진 공정율80%
상생협력 상가	청년 및 소상공인 경제활동공간 조성 (연면적 277㎡, 2층)	1,175	구조안전진단 (E등급, 구조 불안정) 건축물 철거 완료 설계추진	설계중 공정율:90%
도시재생 기반구축	마을활동가 육성 주민공모사업 주민역량강화 모니터링	850	도시재생뉴딜아카데미운영 (상반기 4과목 40명수강)	상반기 뉴딜아카데미 운영중
도시재생 지원센터운영	현장지원센터 운영	800	현장지원센터 운영 (2019. 12. ~ 현재)	인건비 및 센터 운영비

도시재생 인정사업(구.미도탕)

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 금동 22-1번지

◦ 사업면적 : 대지면적 886㎡ / 연면적 834㎡(지상4층)

◦ 사업내용 : 주민을 위한 문화·예술·상업·체험 복합 공간 조성

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 (3년)

◦ 사 업 비 : 4,389백만원 (국비 2,633, 도비 439, 시비 1,317)

(단위 : 백만원)

재 원 별	총사업비	기투자	2022	2023	2024이후	비 고
계	4,389	1,193	867	2,329	0
균 특	2,633	400	520	1,713	-
도 비	439	67	87	285	-
시 비	1,317	726	260	331	-

□ 추진 실적

◦ 도시재생 인정사업 공모 선정                  : `20. 12. 21.

◦ 문화저장소 리뉴얼사업(H/W)

- 실시설계용역 추진                          : `21. 12. ~ `22. 12.

- 공사착공                                   : `23. 02. 27.

◦ 주민역량강화사업(S/W)

- 도시재생대학 운영(1기~5기)                  : `21. 05. ~ `22. 11.

- 주민공모사업 추진(5팀)                      : `21. 09. ~ 12.

- 주민한마당 행사 추진                       : `22. 10. 28. ~ 30.

□ 금후 계획

◦ 사업계획 변경 추진                           : `23. 06. ~ 08.

◦ 문화저장소 리뉴얼 사업(H/W) 준공             : `24. 06.

◦ 주민역량강화사업(S/W) 완료                   : `24. 12.

도시재생 활성화계획 수립

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 동문밖마을, 금동노후주거지

◦ 사업내용 : 활성화계획 수립 2개소 및 공모대응

◦ 사업유형 : 동문밖마을(지역특화재생), 금동노후주거지(우리동네살리기)

◦ 사업기간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

◦ 사 업 비 : 250백만원 /  `23년예산 : 100백만원

□ 추진 실적

<동문밖마을>

◦ 동문밖마을 활성화계획 수립용역 착수               : `22. 04. 19.

◦ 전라북도 사전 컨설팅                              : `23. 01. 19.

<금동노후주거지>

◦ 금동노후주거지 활성화계획 수립용역 착수           : `22. 04. 25.

◦ 전라북도 및 도시재생지원기구(HUG) 컨설팅         : `23. 02. ~ 04.

◦ 공모신청서 제출                                   : `23. 04. 25.

□ 금후 계획

<동문밖마을>

◦ 주민공청회 및 의회의견 수렴                       : `23. 06.

◦ 전라북도 및 도시재생지원기구(HUG) 컨설팅         : `23. 07. ~ 08.

◦ 공모신청서 제출 및 공모대응                       : `23. 09. ~ 12.

<금동노후주거지>

◦ 공모사업 평가 및 최종 선정                        : `23. 06. ~ 07.

생활밀착형 도시재생 스마트 기술지원사업

(계속사업)

□ 개    요

<원도심지구>

◦ 위    치 : 남원시 동충동ㆍ죽항동ㆍ금동 일원(원도심 일원)

◦ 총사업비 : 831백만원(국비 498, 도비 83, 시비 250)

◦ 사업기간 : 2022. ~ 2023.

◦ 사업내용 : 스마트가로등, CCTV, 심장제세동기, 공공 Wifi 설치 등

<터미널지구>

◦ 위    치 : 남원시 동충동ㆍ죽항동 일원(공용버스터미널 일원)

◦ 총사업비 : 834백만원(국비 500, 도비 83, 시비 251)

◦ 사업기간 : 2023. 01. ~ 12.

◦ 사업내용 : 공영주차장 빈자리 알림, 버스 진출입 및 차량 우회전 위험 알림 서비스

□ 추진 실적

<원도심지구>

◦ 국토교통부 공모사업 선정                       : `21. 12. 30.

◦ 실시설계용역 추진                              : `22. 04. ~ 12.

◦ 보안성검토 및 S/W사업 과업심의                 : `22. 08. ~ 11.

◦ 협상에 의한 계약 절차 이행                     : `23. 02. ~ 04.

◦ 사업 착수                                      : `23. 05. 02.

<터미널지구>

◦ 국토교통부 공모사업 선정                       : `22. 12. 29.

◦ 실시설계용역 착수                              : `23. 04. 21.

□ 금후 계획

<원도심지구>

◦ 사업완료                                       : `23. 09.

<터미널지구>

◦ 보안성검토 및 S/W과업 심의 등 행정절차 이행   : `23. 07. ~ 08.

◦ 사업 추진                                      : `23. 09. ~ 12.

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2023. 1.  10. (제 256회)

발언의원 : 윤지홍 의원

발언내용

운봉 밀원마을 조성 프로젝트

◦ 운봉지역 내 마을의 빈집을 활용하여 자연환경 재생마을인 밀원마을을

조성하고, 이와 함께 차 없는 마을 정책을 도입한 생태 도시재생 추진

추진상황

◦남원시 도시재생사업은 도시재생 전략계획에 반영된 활성화지역에 대하여

우선순위＊에 따라 순차적으로 추진하고 있음

＊활성화 지역 우선순위 및 현황

우선 순위	지역명	위치(면적)	현황	비고
1	원도심지역	원도심일원(102만㎡	사업완료
2	터미널지역	공용버스터미널일원(14만㎡)	사업추진
3	동문밖마을	중앙초교 북측 일원(17만㎡)	공모대응
4	금동노후주거지	금동 14통 일원(3.5만㎡)	공모대응
5	만복사지마을	만복사지 북측 일원(10만㎡)	제외검토
6	조산동옻칠마을	금동휴먼시아 남측 일원(14만㎡)	제외검토
7	운봉중심시가지	운봉읍 중심시가지(19만㎡)	`24년 이후

◦운봉중심시가지 지역은 도지새쟁전략계획상 7번째에 해당되는 지역으로

`24년 이후 검토 대상에 해당됨에 따라 `23년 추가경정예산에

활성화계획 수립을 위한 예산 반영 후 용역 발주 예정임

※ 운봉지구 도시재생 활성화지역 개요

◦위 치 : 운봉중심시가지 일원 ◦면 적 : 19만㎡ ◦재생방향 및 전략 - 자연․관광․문화자산과 연계하여 농특산품 판매 - 관광산업 및 지역상권 육성 - 생활SOC 정비․확충을 통한 건강산책형 골목 조성

□ 5분발언 추진상황

발언일자 : 2023. 1.  10. (제 256회)

발언의원 : 염봉섭 의원

발언내용

탄소중립과 녹색성장을 위한 남원시 적극적 사업 추진 촉구

◦ 지구온난화 대비 도시숲 조성, ‘26년까지 8만그루 나무 심기 프로젝트

및 체계적이고 종합적인 계획 수립을 통한 거점화된 도심공원 조성 검토 필요

추진상황

◦‘23년 도시숲 조성사업 추진현황

위 치		사업량	예산액	비고
합 계		1.0ha/10.5㎞	1,600	* 가로수
도시숲	소 계	1.0ha	700
	금지면 옹정리 309-2번지 일원	0.3	300	금지문화누리센터
	금지면 옹정리 301-3번지 일원	0.4	200	김주열열사 기념관
	덕과면 사율리 652-8번지 일원	0.3	200	덕과면 소재지 앞 유휴지
가로수	소 계	10.5㎞	900
	인월면 서무리 95-5 ~ 취암리 65-4	2.5	200	인월면 풍천
	주생면 도산리 5-15 ~ 금지면 입암리 1140-10	3.0	300	주생면 – 금지면 풍촌천
	요천 100리숲길(산동~금지)	5.0	400	수목 보식

* 광치천 미세먼지 차단숲, 옥상정원, 함파우 지방정원 사업 추진중

◦미래 도시디자인 마스터플랜 용역을 통해 체계적인 종합적인 조경 가이드라인 수립예정(제안공모)으로 나무심기 프로젝트를 반영 검토예정임

* 현재 미래도시디자인 마스터플랜 용역발주(946백만원) 및 제안공모 평가 예정(6월초)

◦남원시 7개동을 아우를 수 있는 거점화된 공원 조성 건의는 현재 추진중인 만인공원 조성사업과 부합되며, 철도공사 부지매입 후 공원확대 조성으로 시가지권 대표공원 및 역사와 충혼의 테마공원을 통해 남원시를 대표하는 중심 공원으로 조성코자 현재 행정절차 이행중에 있음