2023. 6.

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

시정질문·5분발언 추진상황

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

□ 상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업

◦ 월락배수지 개량사업

◦ 광역상수도 마을권 급수공사

◦ 소규모수도시설 정비공사

◦ 노후 상수관로 교체 사업

◦ 누수다발지역 상수관로 정비 사업

◦ 타부서 병행 상수도 정비 사업

◦ 상수도관망 DB구축 사업

◦ 송동 동양마을 상수도 정비공사

◦ 급수구역 외 지역 광역상수도 보급 공사

◦ 상수도공기업의 안정적 재정 확충

일  반  현  황

□ 기    구

					상수도사업소장
					박 영 재
수도경영담당					급수시설담당						수도시설담당
박 영 주					박 동 규						이 선 욱
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘소규모수도 시설 관리 ∘개인 급수공사 ∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구						∘월락정수장 개량사업 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	22	1	4	6	4	7
현 원	21	1	8	6	4	2	12 (청경3,공무9)
증 감	△1	-	4			△5

□ 2023년 예산규모  : 24,034백만원

				＜2023 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2023년		2022년			증 감(%)
	합 계		24,034		31,275			△7,241(23.1%)
	일반회계		1,260		1,037			223(21.5%)
	특별회계		22,774		30,238			△7,464(24.7%)

※ 일반회계 자본전출금(11,438백만원) 미포함

▷ 2023년 특별회계 : 22,774백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2023년		2022년			증 감(%)
	합 계			22,774		30,238			△7,464(24.7%)
	자체수입			8,034		8,052			△18(0.2%)
	의존수입		국 비	3,302		10,186			△6,884(67.6%)
			지원금 (자본전출금)	11,438		12,000			△562(4.7%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2023년		2022년			증 감(%)
	합 계			22,774		30,238			△7,464(24.7%)
	사업비		소계	16,080		23,463			△7,383(31.5%)
			투자사업	15,676		22,672			△6,996(30.8%)
			경상사업	404		791			△387(48.9%)
	비사업		소계	6,694		6,775			△81(1.1%)
			행정운영	6,493		6,135			358(5.8%)
			예 비 비	201		640			△439(68.5%)

※ 행정운영 : 인건비 + 물건비 + 경상이전

□ 급수현황

(’22. 12. 31. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
77,948	74,163	95.1	376.5	27,926	74.7

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,130㎞(도수․송수․배수관 623, 급수관 507)

◦ 배  수  지 : 10개소(29,250㎥)

◦ 가  압  장 : 50개소

◦ 감  압  변 : 38개소

◦ 검침급수전 : 29,721전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.415㎢)

□ 소규모 수도시설 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
52	16	36	3,934명 (2,075세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 - 100명 이상 2,500명 이내 급수인구 □소규모급수시설 - 20㎥/일 미만 - 100명 미만의 급수인구

□ 상수도 관로                       (단위:km, ’22. 12. 31. 기준)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,130	226	186	709	9	986	57	87
도수관	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	608	210	-	391	7	564	36	8
급수관	507	6	184	315	2	410	19	78

2023년 상반기 주요성과 및 하반기 추진방향

	상반기 주요성과
◦공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축 ◦월락정수장 현대화 전면 개량사업 4차분 추진 ◦농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진 ◦맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 개선 사업 추진

□ 공기업운영 효율화를 통한 건전재정 기반 구축

◦ 상반기 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 : 2,116백만원

◦ 급수지역 확대로 세입확충 도모 : 148백만원(147전)

□ 월락정수장 현대화 전면 개량사업 추진(공정률 70%)

◦ 월락정수장 개량사업 착공                            : `19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(4차분) 착공                      : `22. 12. ~

- 취수펌프장, 침전지, 혼화지 완료                      : `23. 6.

- 주차장, 관리도로, 조경, 부대공 등 전체공사 완료     : `23. 12.

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 완료(1) : 아영 오산 2지구

◦ 추진중(1) : 보절 지구(용평, 안평, 금계)

◦ 지리산권역(인월·아영·산내 19개 마을) 상수도공사 시행 (’23. 6. ~ ‘25. 12.)

◦ 상수도 급수 외 지역을 2023년 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역에       급수지역으로 변경 반영하여 환경부 승인 후 사업 추진 예정

(지리산권 13개, 주생, 수지, 대산 등 7개, 총 20개 마을)

□ 안정적 물 공급을 위한 광역 및 마을상수도 사업 추진

◦ 광역상수도 마을권 급수사업 (7개마을)

- 추진(7) : 운봉(용산), 송동(동양),보절(금계, 안평, 용평, 섭골),주천(안곡)

◦ 광역상수도 마을권 계량기 설치공사 (7개마을, 176가구)

- 추진(7) : 운봉 용산(68가구), 주천 안곡(22가구), 송동 동양(9가구), 보절금계(28가구)·섭골(11가구)·안평(16가구)·용평(22가구)

◦ 소규모 수도시설 정비사업 (9개소)

- 완료(7) : 주생(내동), 수지(신덕), 보절(용평), 인월(성산), 아영(이동), 산내(중기,외령)

- 추진(2) : 산내 삼화, 하황

□ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 개선사업 추진

◦ 노후 상수관 교체 사업 추진(2개소, L=4.0㎞, 1,081백만원)

- 완료(1) : 금동지구(L=2.0㎞, 731백만원, 포장공 및 부대공)

- 추진(1) : 송동 태동마을(L=2.0㎞, 350백만원, 공정률 30%)

◦ 타부서 병행 상수관 정비 사업 추진(1개소,  L=5.5㎞, 1,500백만원)

- 추진(1) : 송동 송내사촌지구(L=5.5㎞, 1,500백만원, 실시설계 중)

◦ 사용연한(검정유효 기간) 경과 및 노후화에 따른 수도미터기 교체 계획수량 2,182전 교체 추진 완료

※『계량에 관한 법률 시행령』 별표 13 (50㎜초과: 6년, 그 밖의 수도미터:8년)

- 운봉읍 등 21개 읍면동 교체[산내(미급수지역), 대강(2017년 급수보급) 제외]

◦ 긴급 누수복구공사 156개소 완료(232백만원, 공정률 46%)

	하반기 추진방향
◦상수도체납요금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확층 ◦월락정수장 현대화 전면 개량사업 전체 공사 완료 ◦농촌지역 상수도 공급확대 위한 행정절차 이행 완료 및 공사 착공 목표 ◦시민들에게 수원의 안정성 확보와 깨끗하고 맑은 물을 공급하기 위한 광역상수도 보급 및 소규모수도시설 개선 사업 추진 ◦상수도의 급속한 노후화로 단수 등 수도사고로 경제적 손실‧수질사고‧주민 생활 불편을 초래하여 유수율 제고를 통한 공기업 재무개선과 주민 삶의 질 향상 도모 ◦상수도 관망 DB 구축사업을 추진하여 체계적인 상수도 관망 데이터 베이스 구축 및 관리로 각종 굴착 공사 시행 시 관로사고 사전 예방과 타부서(기관 등)간 사업계획 수립 능력 향상 도모

상반기 업무추진실적 및 하반기 업무추진계획

월락정수장 현대화 전면 개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 (5개년)

◦ 총사업비 : 34,116백만원 (국비 17,058, 도비 3,411, 시비 13,647)

(단위 : 백만원)

구분	합계	재원투자내역					‘23이후	비고
		소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	34,116	34,116	2,434	9,738	10,554	11,390	-
국비	17,058	17,058	1,217	4,869	5,277	5,695	-
도비	3,411	3,411	243	974	1,055	1,139	-
시비	13,647	13,647	974	3,895	4,222	4,556	-

※ 환경부 국비 교부(`19~`22년)완료에 따른 `23년 예산 미편성.(`22년도에 `23년 사업비 선교부)

`23년 예산은 `22년 잔여예산을 명시이월하여 사용.

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업 착공                           : `19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 준공                     : `19. 12. ~ `20. 5.

- 기존자재창고 및 완속여과지 철거

◦ 월락정수장 개량사업(2차분) 준공                     : `20. 4. ~ `21. 5.

- 급속여과지 및 관리동 신설 및 입주, 정수지 가시설 등

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 준공                     : `21. 4. ~ `22. 12.

◦ 월락정수장 개량사업(4차분) 착공(전체 공정률 70%)    : `22. 12. ~ `23. 12.

※ 4차분 추진 내용 : 착수정, 응집침전지, 취수펌프장, 주차장 등 공사완료

□ 금후계획

◦ 취수펌프장, 침전지, 혼화지 완료	: `23. 6.

◦ 배출처리장, 관리도로, 조경, 부대공 등 전체공사 완료	: `23. 12.

농어촌생활용수 개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 인월면, 아영면, 산내면 일원

◦ 사업지구 : 8개 지구, 43개 마을 (’22년 : 5개 지구, 31개 마을)

- 농어촌생활용수 개발사업 35개마을, 자연방사성물질 검출지구 8개마을*

* 회덕, 노치, 주촌, 고촌, 내기, 배촌, 덕촌, 안곡

◦ 사업내용 : 배수관로 L=56.36km, 마을 지선관 L=17.96km,

송수관로 L=12.1km, 배수지 1개소

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 (8개년)

◦ 총사업비 : 27,572백만원 (국비 2,844, 도비 16,457, 시비 8,271)

- 기투자액 : 12,185백만원 (국비 2,844, 도비 5,686, 시비 3,655)

- 2023년 사업비 : 4,000백만원 (도비 2,800, 시비 1,200)

- 이후 사업비 : 11,387백만원 (도비 7,971, 시비 3,416)

□ 추진실적

◦ `23년 추진 완료(아영 오산지구(성리, 구상리))

◦ 지리산권역(인월·아영·산내) 실시설계용역 완료 (19개마을) : `21. 11. ~ `23. 3.

- 인월(2개마을), 아영(2개마을), 산내(15개마을)

- 경제성 검토VE(`22. 11.), 건설기술심의(`23. 1.), 원가심가(`23. 3.) 완료

□ 금후계획

◦ 지리산권역 농어촌생활용수 개발사업 추진

- 상수도 도시계획 시설결정인가 등(행정절차 이행) : `23. 5.

- 공사 발주 및 착공 시행	: `23. 6. ~ `25. 12.

월락배수지 개량사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원 월락배수지(도통동 산 2-2)

◦ 사업기간 : 2023년(1개년)

◦ 사업규모 : 배수지 스테인리스 패널 설치 및 제수밸브 설치

배수지 7,500ton(3,750ton × 2지)

◦ 총사업비 : 2,000백만원(국비 25%, 시비 75%)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
합계	2,000	-	2,000	-
국비	500	-	500	-
시비	1,500	-	1,500	-

□ 추진실적

◦ 배수지 1지 공사 착공	: `23. 2.

◦ 노후기반 성능개선지원 공모사업 국비확보(5억원)	: `23. 3.

◦ 1회 추경 반영	: `23. 4.

◦ 배수지 1지 공사완료	: `23. 5.

□ 금후계획

◦ 2지 공사 착공 및 공사 추진                         : `23. 5. ~ 10.

광역상수도 마을권 급수공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 운봉읍(용산), 주천면(안곡), 보절면(금계, 섭골)

◦ 사 업 량 : 급수관로 매설(D=16~50mm, L=5km), 마을권 계량기 설치

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(시비 1,000백만원)

◦ 사업내용 : 소규모수도시설을 이용하는 마을에 안정적이고 깨끗한 광역상수도 보급

□ 추진실적

◦ 보절면 금계마을 행정절차 이행 및 공사 착공

행정절차	주민설명회	일상감사	도로굴착허가
이행날짜	`22. 11. 21.	`23. 1. 16.	`23. 2. 22.

◦ 운봉읍 용산마을 광역상수도 매설공사 실시설계용역 시행  : `23. 4. 18.~

□ 금후계획

◦ 보절면 금계마을 광역상수도 보급공사 준공	: `23. 5. ~ 6.

◦ 운봉읍 용산마을 행정절차(일상감사, 주민설명회) 및 광역상수도

매설공사 추진	: `23. 5. ~ 7.

◦ 보절면 섭골마을 마을권 계량기 설치사업 추진	: `23. 6. ~ 7.

◦ 주천면 안곡마을 마을권 계량기 설치사업 추진	: `23. 7. ~ 9.

소규모수도시설 정비공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 소규모수도시설 52개소

◦ 사 업 량 : 소규모수도시설 노후화 시설 개선 사업 및 긴급복구사업

(누수복구 및 시설교체), 기능상실 시설물 철거사업

◦ 사 업 비 : 770백만원(도비:400백만원, 시비:370백만원)

◦ 사업목적 : 광역·지방상수도를 공급받지 못하는 소규모수도시설을 이용하는

마을에 낙후된 시설을 개량하여 안정적이고 깨끗한 물을 공급하기 위함.

□ 추진실적

◦ 산내지구 하황마을 노후상수관 개선공사 착공	: `22. 11. 28.

◦ 산내지구 삼화마을 노후상수관 개선공사 착공(1차분)	: `22. 12. 20.

◦ 마을상수도 긴급복구 추진	: `23. 1. ~ 5.

- 누수복구(3개소) : 아영 이동, 주생 내동, 산내 중기

- 펌프교체(4개소) : 산내 외령,  보절 용평, 수지 신덕, 인월 성산

□ 금후계획

◦ 소규모수도시설 노후화시설(수위조절기, 소독약투입기, 두수공 등) 개량 및 기능상실 시설물(물탱크해체, 관정 폐공)철거사업	: `23.  5. ~ 6.

◦ 소규모수도시설 노후상수관 개선공사 실시설계 및 공사추진 : `23.  5. ~ 6.

◦ 산내지구 삼화마을 노후상수관 개선공사 추진(2차분)	: `23.  6. ~ 9.

◦ 소규모수도시설 긴급복구사업(긴급누수복구 등) 추진	: 연중수시

노후 상수관로 교체 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2027년(15년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 150㎞   / `23년 2개소, L=3.8㎞

- `23년도 추진 : 금동지구 L=2.1㎞, 도통동 우체국~GS편의점(DCIP, 2001, 1.7㎞)

내척동(내척4교) L=0.03㎞

◦ 총사업비 : 26,000백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
26,000	22,000	500	3,500

□ 추진실적

◦ `22년까지 관로 교체 L=141.1㎞

- 노후관 교체 96.7㎞, 타공사 병행 28.4㎞, 타부서 13.0㎞, 재해복구 3.0㎞

◦ 금동지구 노후 상수관 교체공사 완료(포장공, 부대공) : `22. 6. ~ `23. 5.

◦ 내척동(내척4교) 상수관로 관매달기공사 추진	: `23. 4. ~ 5.

- 상수관 매설(D75~16㎜) L=14m, 관매달기 1식(D75㎜) L=19m, 24백만원

◦ 사업대상지 선정에 따른 적정성‧타당성 검토 추진(1개소)	: `23. 5. ~

- 도통동 우체국 ~ GS편의점 4가 L=1.7㎞

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(도통동 우체국~GS편의점 4가 L=1.7㎞)	: `23. 6. ~ 7.

◦ 도통동 우체국~GS편의점 4가 상수도 정비공사 추진	: `23. 8. ~ 11.

- 사업비 : 400백만원 / 과업량 : 노후 상수관 교체 L=1.7㎞

누수다발지역 상수관로 정비 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2027년(14년)

◦ 사업규모 : 누수다발 상수관 교체 66㎞  / `23년 1개소, 465백만원, L=1.5㎞

- `23년 추진 : 송동 송내사촌지구(D100~16㎜) L=5.5㎞

◦ 총사업비 : 10,695백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
10,695	8,230	465	2,000

□ 추진실적

◦ `22년까지 관로 교체 L=56.2㎞

- 읍·면지역 39.7㎞(이백면 외 8개소), 동지역 16.5㎞(왕정동 외 5개소)

◦ 사업구간 중복에 따른 유관부서 협의 추진(건설과)	: `23. 1. ~ 2. 22.

- 도로굴착 심의회 원안 가결 득	: `23. 2. 22.

◦ 실시설계용역 추진(송동 송내사촌지구)	: `23. 2. ~ 5.

- 용역비 : 77백만원 / 과업량 : 노후 상수관 교체 1식(D100~16㎜) L=5.5㎞

◦ 주민설명회 개최(송내, 내‧외사촌마을)	: `23. 5. 3.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(원가심사)	: `23. 5.

◦ 행정절차[도로점용(굴착) 허가 등] 이행 및 공사 추진	: `23. 6. ~ 12.

타부서 병행 상수도 정비 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 타 부서 병행 굴착 지역

◦ 사업기간 : 2022년 ∼ 2023년(2년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 L=9.2㎞

- `23년 추진 : 송동 태동(DCIP, 2004, L=2.1㎞), 노암 3통(DCIP, 1997~2003, L=0.8㎞)

◦ 총사업비 : 2,100백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
2,100	600	1,500	-

□ 추진실적

◦ `22년 타부서 병행 상수도 정비 공사 완료(4개소, L=3.2㎞)

- 송동 동서내 2.0㎞, 함파우마을 0.8㎞, 산동 태평 0.07㎞, 건설과 지원 0.3㎞

◦ 실시설계용역 추진(송동 태동)	: `22. 12. ~ `23. 2.

◦ 관련부서 협의 추진(중복구간 병행 추진 검토 등)      : `23. 2. ~ 3.

- 환경사업소 의견 : 예산확보 지연에 따른 5월 중 공사 추진

◦ 도로관리 심의 가결(송동 태동) 및 점용허가	: `23. 3.

◦ 송동 태동마을 노후상수관 교체공사 추진	: `23. 3. ~ 8.

- 환경사업소 중복 외 구간 선 공사 추진	: `23. 3. ~ 5.

◦ 사업대상지 선정에 따른 적정성‧타당성 검토 추진(노암3통)	: `23. 5. ~

- 일자리경제과, 전북도시가스와 상시 협의체계 구축을 통한 사업 추진

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(원가심사)	: `23. 5.

◦ 행정절차[도로점용(굴착) 허가 등] 이행 및 공사 추진	: `23. 6. ~

상수도관망 DB구축 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 상수관로 DB 미구축 지역(기 매설관로)

◦ 사업기간 : 2023년 ∼ 2027년(5년)

◦ 사업규모 : 상수관로 탐사 및 GIS DB구축 및 정확도 개선 L=285㎞

-  `23년 계획 : 운봉, 이백, 산동 배수지권 L=53㎞

※ 산출근거 : 980백만원 = 53㎞ ✕ 18,500천원/㎞당(GPR 비굴착 탐사)

◦ 총사업비 : 5,000백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2023년	2024년 이후	비 고
5,000	-	1,000	4,000

□ 추진실적

◦ 재정투자심사 완료	: `22. 11. 29.

◦ 상수관망도 GIS DB 구축 정확도 개선사업 추진계획 수립  : `23.  2. 24.

◦ 관련부서(민원과 등) 협의 추진	: `23.  4. ~

- 공간정보시스템 관리부서(민원과)와 기존 프로그램의 로딩 등 협의 추진 중

□ 금후계획

◦ 협상에 의한 계약 추진	: `23.  5. ~ 6.

◦ GIS DB 구축 및 정확도 개선사업 추진	: `23.  6. ~ `24. 12.

송동 동양마을 상수도 정비공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 개인관정을 이용하는 독립 가옥의 수질상태가 식수로 사용하기

부적합하므로 맑고 안정된 광역상수도 보급으로 지역 주민의

생활인프라를 개선하고자 함.

◦ 위    치 : 송동면 동양마을 (동양길 7번지 일원)

◦ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 5.

◦ 사 업 량 : 광역상수도 급·배수관로 매설(D=16 ~ 75mm, L=1,618m)

◦ 사 업 비 : 380백만원(특별조정교부금 220백만원, 시비 160백만원)

□ 추진실적

◦ 행정절차(일상감사 및 주민설명회) 이행	: `23. 1. 11.

◦ 광역상수도 매설공사 실시설계용역 완료	: `23.  1. 19.

◦ 송동면 동양마을 광역상수도 매설 공사 착공	: `23. 2. 6.

◦ 관로매설 연장구간에 따른 구거점용허가(농정과) 협의	: `23. 4. 28.

□ 금후계획

◦ 동양마을 광역상수도 매설공사 수압시험 및 준공	: `23. 5. ~

◦ 동양마을 마을권 계량기 설치 공사 완료	: `23. 5. ~

급수구역 외 지역 광역상수도 보급 공사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 사업목적 : 급수구역 외 지역의 소규모수도시설을 이용하는 마을에  맑고 깨끗한 광역상수도를 안정적으로 공급하고자 함.

◦ 위    치 : 보절면 용평, 안평 마을 (보절면 도룡리 65-1번지 일원)

◦ 기    간 : 2022. 12. ~ 2023. 6.

◦ 사 업 량 : 급·배수관 매설(D=15 ~ 100mm, L=1.5km)

◦ 사 업 비 : 300백만원(국비:300백만원)

□ 추진실적

◦ 행안부 지방상수도 경영효율화 사업 공모 선정          : `22. 7. 15.

◦ 보절지구(안평,용평,섭골,금계) 상수도 실시설계용역 준공 : `22.  10. 31.

◦ 행정절차(원가심사 및 일상감사, 주민설명회)이행	: `22.  11. 16.

◦ 보절(안평, 용평) 광역상수도 매설공사 착공	: `22.  12. 5.

□ 금후계획

◦ 용평,안평마을 광역상수도 매설공사 수압시험 및 준공     : `23. 5.

◦ 용평,안평마을 마을권 계량기 설치 공사 추진	: `23. 5. ~ 6.

◦ 사촌가압장 증축 공사 준공 및 광역상수도 보급	: `23. 6. ~

상수도공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역

(단위 : 백만원)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	전년대비
세 입	18,596	26,285	28,165	30,238	21,773	27.9% 감

☞ 2022년 대비 주요 증감 요인(84.6억원 감)

- 지리산권역 농어촌생활용수 개발, 상수도관망도 DB구축    : 50억원 증

- 월락정수장 현대화 전면 개량사업(태양광 설치사업)              : 107.4억원 감

- 스마트 관망관리 인프라 구축, 노후 상수관로 교체사업 등  : 27.2억원 감

□ 추진실적

◦ 상수도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 2,116백만원

- 체납특별징수 기간 운영(4회) : 단수 및 압류 예고 1,816건

◦ 수도요금 징수내역(5.10.기준)

(단위 : 천원)

구 분	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
계	2,358,241	2,116,852	241,389	89.7%
현년도	2,117,863	2,015,297	102,566	95.1%
과년도	240,378	101,555	138,823	42.2%

◦ 상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(147전)          : 148백만원

◦  영업외수입 및 기타영업외수익(이자수입, 불용품 매각수입 등)     : 123백만원

□ 금후계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속 운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 상수도 유수율 제고 및 수도시설 운영관리 전문성 제고