2024. 1.

2024년 주요업무 계획

건   설   과

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 주요업무 결산

□ 2024년 중점 추진방향

□ 2024년 주요업무 계획

◦ 동지역 도로망 정비사업(총괄)

□ 대로 개설사업

□ 중로 개설사업

□ 소로 정비사업

□ 그린뉴딜 지중화 사업

□ 식정 관광 우회도로 지역개발사업

◦ 장기미집행 도시계획시설(도로) 편입부지 매입

◦ 읍면지역 도로망 정비사업(총괄)

□ 읍·면지역시도 정비사업

□ 농어촌도로 정비사업

□ 통행불편 마을진입로 정비사업

□ 위험도로 선형개선사업

◦ 시설물안전법 대상 교량․터널 관리사업

◦ 가로보안등 스마트 원격제어시스템 구축

◦ 가로보안등 운영 및 유지관리

◦ 겨울철 도로 제설대책 추진

◦ 도로 유지관리 사업

◦ 2024년도 유관기관 투자사업 계획(도로)

◦ 요천 지역맞춤형 통합하천사업

◦ 광한루원 앞 도로환경 개선사업

◦ 육상골재채취 허가 및 관리

◦ 부 록

일  반  현  황

□ 기    구

						건설과장
						박 준 기
건설행정팀장					가로정비팀장						도로팀장					통합하천정비팀장
김 현 호					양 진 석						성 월 계					채 윤 호
설해대책추진 도로 점‧사용 허가 국‧공유 재산관리 도로불법점용․과적 단속 골재업무 가로등 설치 및 관리					가로정비사업(대로)가로정비사업(중로) 가로정비사업(소로) 지중화 사업 보행자우선도로 개설사업						읍면시도 확․포장사업 농어촌도로 확․포장사업 통행불편 도로사업 위험도로개선사업 도로 유지관리사업					요천(국가)지역맞춤형 통합하천사업 광한루 정문 앞 도로환경개선사업 하천사업 용지보상

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	40	1	4	7	7	5	□청원경찰 : - □공 무 직 : 16명
현 원	38	1	6	7	2	7	□청원경찰 : - □공 무 직 : 15명
증 감	△2	-	증2	-	△5	증2	△1

□ 도로관리사무소 운영 현황

◦ 위    치 : 남원시 주생면 상동리 99-1번지

◦ 면    적 : 대지면적 11,814㎡(3,574평) / 건축면적 1,809㎡(548평)

◦ 장비현황

구 분	장 비 현 황
	소 계	굴삭기	15톤 D.T	8톤 트럭	5.5톤 트럭	5톤 D.T	1톤 트럭	스키드로더	노면청소차
보유수량	12	2	3	1	1	1	2	1	1

◦ 인력현황

구 분	인 력 현 황
	소계	도 로 관리원	운전원	비고
총인원	14	11	3	도로관리원 실근무 9명 (소통실 파견 1, 보상업무 1)

□ 도로현황                               (2023. 12. 기준)

도 로 별		노선수	총연장 (km)	포 장 (km)	포장률 (%)	비 고 (관리기관)
합 계		916	1,449	947.1	65.4
고 속 국 도		2	69.0	69.0	100.0	한국도로공사
국 도		5	123.8	123.8	100.0	국토교통부 (익산지방국토관리청)
국가지원지방도		2	47.7	47.7	100.0 (전북 98.2%)	전라북도 (도 도로관리사업소)
지 방 도		7	120.2	107.0	89.0 (전북 81.2%)	전라북도 (도 도로관리사업소)
시도	동 지 역	473	178.7	105.7	59.1 (전북 79.9%)	남원시
	읍면지역	21	164.0	134.3	81.9 (전북 64.8%)	남원시
농 어 촌 도		406	745.6	359.6	48.2 (전북 38.8%)	남원시

※ 남원시 도로건설·관리계획 고시 (2022.2.18. 남원시 고시 제2022-11호)

※ 남원시 농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 고시(2022.2.18. 남원시 고시 제2022-11호)

2023년 주요업무 결산

	〈 주 요 성 과 〉
◦ (통합하천 추진여건 강화) 영산강유역환경청과 업무협약(MOU, ‘23.7.) 체결로 하천기본계획(변경), 비관리청 사업시행인가 등 신속추진 여건 강화 ◦ (국도․지방도 간선도로 확충) 국도․국지도 4개 지구(L=21.8km, 2,320억원), 지방도 2개 지구(L=12.38km, 84.4억원) 국․도비 반영 및 실시설계 추진 ◦ (도로평가)‘23년 전라북도 도로관리 평가결과 우리시『우수기관』선정 ◦ (국․도비 예산 확보) 그린뉴딜 지중화, 스마트 원격제어, 위험도로, 교량(터널) 등 국․도비 25.96억원 확보로 자체 재원 부담 완화 - 국비(그린뉴딜 지중화 3개소 5.28억원), 스마트 원격제어(3.18억원), 도비(주생 금풍 위험도로 3.5억원), 특별교부세(남원터널 5억원, 의총교 9억원)

□ 민선8기 공약사업 실천 노력

ㅇ  (통합하천) 요천 지역맞춤형 통합하천사업 친수·치수시설 기본구상(안) 타당성 검토를 통해 실현 가능성 확보 및 하천관리청 협의(8차 방문) 완료

*  (친수) 둔치조성 137천㎡, 시민공원, 파크골프장, 포차거리, 필터가든 등 250억원

* (치수) 육역화방지 23.15㎞, 지류하천 교량개선 4개소, 취수보(가동보) 개량 8개소 등 312억원

- 환경부 통합하천사업 지침 변경에 따라 우리시 추진 방향 결정

*  (당초) 친수·치수 국비지원 50%, 남원시 추진

→ (변경) 친수 남원시(시비), 치수 환경부(국비) 추진

ㅇ (요천로 공원화) 장래 교통량 및 경제성 분석(B/C)을 통해 광한루원 앞 요천로 공원화를 위한 적정 개발안 도출

* 지하차도 신설(4차로 795m, 641억원) → 도로 다이어트(700m, 2~3차로, 50억원)를 통한 공원

추진 방향 확정

-  시민·전문가 참여 거버넌스, 시민소통위원회, 남원시의회 의견수렴 및 지방   행정연구원(LIMAC) 컨설팅 의견 반영

□ 읍면지역 도로망 확충으로 지역 경쟁력 제고 노력

ㅇ  (도시 가로망) 도시계획도로 14개 지구, 8.4㎞ 개설 추진으로 생활환경개선 및 도시성장 인프라 확충

* 신촌 소로(0.3㎞), 국민연금공단 소로(0.11㎞), 쑥골길 소로(0.11㎞) 3개소 0.52㎞ 완공

ㅇ  (농촌 도로망) 읍면지역 도로망 14개 지구 19.18㎞ 확·포장사업 추진으로 농촌마을 정주여건 개선

* 읍면지역 시도(2.6㎞), 마을 진입로(0.28㎞), 위험도로(3지구, 0.48㎞) 총 5개 지구 3.36㎞ 완공

ㅇ  (간선 도로망) 국도·국지도 5개년 사업(’21~‘25 / 국토부), 지방도 확·포장사업(`21~`25 / 전북도) 유치 등 간선 도로망 연결 강화로 균형발전 도모

* (국토부) 국지 60호(주천~고기), 국도 24호(이백~운봉), 국지 37호(인월~아영) 실시설계 추진

- 국도24호(대강~대산) `24년 실시설계비 2억원 반영

* (전북도) 지방도730호(대강~금지), 지방도745호(사매수촌~임실삼계) 실시설계 추진

□ 시민 중심의 안전한 도심 가로망 조성

ㅇ  (위험도로 정비) 위험도로 선형개량(4개소), 교통사고 잦은 곳 개선(5개소) 등 상습 교통사고 지점 개선(S자 선형, 급커브, 병목지점 등)

* (위험도로 4개소) 송동 문치, 대산 감성~금강, 사매 양지~무산 0.48㎞ 완료

* (교통사고 잦은 곳 5개소) 동문사거리 등 교통사고지역 교차로 개선, 교통시설물 등 설치

ㅇ  (보행환경 개선) 보행자 우선도로 정비로 보행자 안전·편의 중심의 보행환경 인프라 확충 (보행자 우선도로 22개 노선 지정 고시, `23. 1.)

* 하정2길·마방길·시청남로 등 3개지구 1.21㎞ 실시설계 완료(국비 450백만원 확보)

ㅇ  (가로환경 정비) 그린뉴딜 지중화사업을 통해 관광도시 이미지 제고 및 쾌적한 가로환경 조성

* (지중화 3개소) 용성초, 중앙초, 도통초 등 3개지구 1.98㎞ 정비 완료(국비 528백만원)

ㅇ  (도로 유지관리) 중점관리 도로시설(교량, 터널) 적기 보수·보강 및 불법 도로점용물 정비 등 안전한 가로환경 조성

* (민원처리 133건) 찾아가는 현장시장실 37건, 국민신문고 56건, 기타 민원 40건

* (시특법시설 15개소) 교량 보수·보강 4개, 내진보강 3개, 정밀진단 8개 성능개선

* (소파보수 148건) 도로파손 11개, 인도파손 11개, 안전시설 110개, 물고임 16개

* (재포장 15개소) 송동 송내사촌길, 보절 사촌길 등 아스콘 덧씌우기 재포장

ㅇ  (가로·보안등 관리) 가로·보안등 스마트 원격제어시스템 구축, 농촌 우범·취약지 보안등 설치로 안전하고 밝은 밤거리 조성 노력

* (스마트 원격제어 2,304개소) `23년 2,304개 포함 누적 9,507개소 설치(구축률 : 90%)

* (보안등 설치 387등) ‘22년 16,608등 → ’23년 16,994등 / 추가 387등

* (고장수리 5,033건) 램프교체 1,874건, 빛가리개 설치 286건, 기타 2,873건

	〈 아쉬운 점 〉
◦ (공약사업) 요천 통합하천 사업 기본 및 실시설계 발주 지연 - 기획재정부 국가하천 친수사업 국비지원 불가 방침으로 환경부 지역맞춤형 사업 지침 변경(`23. 9.) ◦ (시민불편) 도로굴착 등 취약분야에서 여전히 불편민원 발생 - 사전 굴착협의 노력(도로관리 심의회)에도 불구, 지중화 사업 관계기관 각기 도로 굴착으로 공사 피로도 가중 ◦ (사업지연) 용지매입 불응, 유지관리비 부족으로 사업기관 과다소요 - 사업지구 선정 시 동의서 제출 등 주민 호응도는 높으나, 보상단계 협의 불응으로 사업 착수 지연 사례 발생(보상률 80% 이상 우선 추진) ◦ (업무중복) 부서간 업무연찬 부족으로 추진사업 중복사례 발생 - 교룡중로, 요천 통합하천 사업 등 부서간 업무연찬 부족으로 사업 디자인 콘셉트 일원화 및 시너지 효과 제고 한계

2024년 중점 추진방향

‘문화와 미래산업으로 도양하는 남원’

건설과가 기반을 만들어 가겠습니다.

	〈 중 점 추 진 과 제 〉
◦ 민선 8기 공약사업 가시적 성과 - 요천 지역맞춤형 통합하천사업 신속추진 노력 - 광한루원 앞 요천로 공원화로 관광거점 연계 강화 ◦ 도시 가로환경 정비로 생활인구 유입기반 마련 - 간선 도로망 연결 강화로 지역 균형발전 도모 - 도시디자인 향상으로 쾌적한 도로환경 조성 - 보행자의 안전과 편의를 위한 도로 조성 ◦ 소득기반 교통연결 및 살고 싶은 농촌 환경 조성 - 농촌지역 거점 연계 강화로 정주여건 개선 - 위험도로 구조개선으로 안전한 생활도로 조성 - 중점시설 선제적 보수‧보강으로 대형재해 예방 ◦ 시민 중심의 안전하고 편리한 환경 조성 - 시민안전과 도로의 기능유지를 위한 도로관리 추진 - 야간경관 개선을 통한 관광도시 활성화 - 각종 인·허가 처리절차 개선으로 민원 편의 증진

2024년 주요업무 계획

동지역 도로망 정비사업(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 15개 지구, L = 8.2㎞

◦ 총사업비 : 52,220백만원 (`24 : 6,926백만원/ 국비 563 시비 6,363)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2026년(6개년)

구 분	사 업 량(km)		사업기간	사업비(백만원)				추진상황
				계	기투자	2024	2025이후
계	15개 지구	L=8.2		52,220 (국비5,141)	22,740 (국비3,362)	6,926 (국비563)	22,554 (국비1,216)
대로	1개 지구	L=0.39		2,500	1,550	950	-
	천왕봉로	0.39	`20 ~ `24	2,500	1,550	950	-	설계완료(100%)
중로	2개 지구	L=0.75		5,600	955	50	4,595
	교룡중로	0.36	`23 ~ `25	4,300	955	-	3,345	설계완료(100%)
	도통중로	0.39	`24 ~ `26	1,300	-	50	1,250	실시설계예정
소로	6개 지구	L=1,605		3,050	50	1,500	1,500
	동문로 안전한 보행환경	0.66	`24	500	-	500	-	실시설계예정
	윗정재마을 진입로	0.10	`24	500	-	500	-	설계중(30%)
	신촌안길	0.18	`24	300	-	300	-	설계중(30%)
	내척길 진입로	0.23	`24	150	-	150	-	설계중(30%)
	교룡소로	0.05	`23 ~ `25	300	50	-	250	설계완료(100%)
	도통소로	0.39	`24 ~ `26	1,300	-	50	1,250	실시설계예정
그린뉴딜 지중화	3개 지구	L=1.73		6,394 (국비528)	4,894 (국비528)	1,500	-
	운봉초·중	1.10	`23 ~ `24	2,895 (국비528)	1,395 (국비528)	1,500	-	설계중(10%)
	LX드론 활용센터	0.43	`21 ~ `24	879	879	-	-	공사중(10%)
	고죽동 노인복지	0.20	`22 ~ `24	2,620	2,620	-	-	설계완료(100%)
지역개발 사업	1개 지구	L=3.07		12,000 (국비4,613)	5,711 (국비2,834)	1,126 (국비563)	5,163 (국비1,216)
	식정관광 우회도로	3.07	`20 ~ `25	12,000 (국비4,613)	5,711 (국비2,834)	1,126 (국비563)	5,163 (국비1,216)	공사중(20%)
보상 기타	2개 지구	L=0.70		22,676	9,580	1,800	11,296
	장기미집행 (도로)보상	관내	`20 ~ `25	20,176	7,880	1,000	11,296	토지보상
	중소도로 유지관리	0.70	`23	2,500	1,700	800	-

□ 대로 개설사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 양진석  담당자 : 허민재 전화 : 6464

□ 추진근거

◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제86조(도시․군계획시설의 시행자)

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

□ 개    요

◦ 계    획 : 33개 노선 / 65,957㎞

◦ 완    료 : 28개 노선 / 55,529㎞

◦ 시 행 중 : 1개 노선 / 0.4㎞ / 2,500백만원 (`24년 : 950백만원)

- `24 완공 : 1개 지구

사 업 명	면	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2024	2025이후
천왕봉대로	인월	0.39	2,500	1,550	950	-	62	`20 ~ `24

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 시행(주민설명회 `20.6.10.)	: `20. 02. 24. ~ 06. 22

◦ 실시계획 인가 고시	: `20. 06. 22.

◦ 분할측량 및 보상계획 공고	: `21. 06. 10.

◦ 편입토지·지장물 보상금 산정 및 협의(1차~4차) / 보상률 77%

□ 금후계획

◦ 공사 착공(1차분)	: `23. 12.

□ 중로 개설사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 양진석  담당자 : 김황연 전화 : 6542

□ 추진근거

◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제86조(도시․군계획시설의 시행자)

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

□ 개    요

◦ 계    획 : 137개 노선 / 201,603㎞

◦ 완    료 : 124개 노선 / 194,601㎞

◦ 시 행 중 : 2개 노선 /  0.7㎞ / 5,600백만원

- `25 완공 : 1개 지구 / `26 완공 : 1개 지구

사 업 명	동	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2024	2025이후
계	2개지구	0.75	5,600	955	50	4,595	17
교룡중로	향교	0.36	4,300	955	-	3,345	22	`23 ~ `25
도통중로	도통	0.39	1,300	-	50	1,250	-	`24 ~ `26

□ 추진실적

◦ 교룡 중·소로

- 실시설계용역 추진	: `23. 02. ~ `23. 12.

- 문화재 발굴 협의 및 문화재청 협의 추진	: `23. 11. ~ 12.

- 교룡중로 편입토지 및 지장물 협의 매수 추진중 / 보상률 94%

□ 금후계획

◦ 교룡 중·소로 연계구간 실시설계 추진	: `24. 3. ~

- 인도교 및 남원읍성구간 추진에 따른 인근도로(교룡대로)정비 추진

◦ 도통 중·소로 실시설계 추진	: `24. 1. ~

□ 소로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 양진석  담당자 : 장한비 전화 : 6549

□ 추진근거

◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제86조(도시․군계획시설의 시행자)

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

□ 개    요

◦ 계    획 : 564개 노선 / 381,285㎞

◦ 완    료 : 523개 노선 / 327,227㎞

◦ 시 행 중 : 5개 노선 / 1.6㎞ / 3,050백만원

- `24 완공 : 4개 지구 / `25 완공 : 1개 지구 / `26 완공 : 1개 지구

사 업 명	동	사업량 (km)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2024	2025이후
계	6개지구	1.61	3,050	50	1,500	1,500	2
동문로 안전한 보행환경	동충	0.66	500	-	500	-	-	`24
윗정재마을 진입로	신정	0.10	500	-	500	-	-	`24
신촌안길	신촌	0.18	300	-	300	-	-	`24
내척길 진입로	용정	0.23	150	-	150	-	-	`24
교룡소로	향교	0.05	300	50	-	250	17	`23 ~ `25
도통소로	도통	0.39	1,300	-	50	1,250	-	`24 ~ `26

※ 교룡, 도통 소로의 경우 중로 개설공사와 병행 추진

□ 추진실적

◦ 윗정재마을 진입로 실시설계용역 추진            : `23. 10. ~ `24. 2.

◦ 신촌 안길 실시설계용역 추진	: `23. 10. ~ `24. 2.

◦ 내척길 진입로 실시설계용역 추진	: `23. 10. ~ `24. 2.

□ 금후계획

◦ 동문로 안전한 보행환경 실시설계용역 추진	: `24. 1. ~ 4.

◦ 3개노선(윗정재, 신촌 안길, 내척길 진입로) 공사추진	: `24. 3. ~ 8.

◦ 동문로 안전한 보행환경 공사 추진	: `24. 4. ~ 10.

□ 그린뉴딜 지중화 사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 양진석  담당자 : 허민재 전화 : 6464

□ 추진근거

◦ 전선로 지중화 지원사업 국비 지침

- 산업통상자원부 전력계통혁신과-204(2023.2.14.)호

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

□ 개    요

사 업 명		위치	사업량 (km)	사업비(백만원)					한전/통신 부담	비고
				계	인도	지중화
						소계	국비	시비
계		3지구	1.73	6,394	2,200	5,441	528	2,427	2,486
소계		1	1.10	2,895	1,500	2,642	528	867	1,247
그린 뉴딜	운봉초·중	운봉읍	1.10	2,895 (국비528)	1,500	2,642	528	867	1,247	‘23 ~‘24
소계		2	0.63	3,499	700	2,799		1,560	1,239
지중화	LX드론 활용센터	주생면	0.43	879	-	879	-	600	279	‘21 ~‘24
	고죽동 (노인복지센터)	고죽동	0.20	2,620	700	1,920	-	960	960	‘22 ~‘24

□ 추진실적

◦ 그린뉴딜(운봉초·중)

- 지중화 협약 체결(한전,통신)	: `23. 04. ~ 12.

- 실시설계용역 추진	: `23. 12. ~ `24. 03.

◦ 고죽동(노인복지센터)

- 지중화 협약 체결(한전,통신)	: `23. 03. ~ 09.

- 실시설계용역 추진	: `23. 02. ~ 07.

- 공사 착공	: `23. 12. 24.

◦ LX드론활용센터

- 실시설계용역 추진	: `21. 10. ~ 11.

- 공사 착공	: `23. 10. 24.

□ 금후계획

◦ 공사 완료추진	: `24. 06. ~ 12.

- 고죽동노인복지센터, Lx드론활용센터  `24. 6월중 공사 완료

□ 식정 관광 우회도로 지역개발사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 양진석  담당자 : 김황연 전화 : 6542

□ 추진근거

◦「지역개발 및 지원에 관한 법률」제23조(실시계획승인)

□ 개    요

◦ 위    치 : 식정동 일원

◦ 사업내용 : 도로개설 L=3.07㎞,B=10, 교량2개소

◦ 총사업비 : 12,000백만원(국비 4,613, 시비 7,387)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2025(6개년)

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 완료 및 주민설명회(2회)         : `20. 1. ~ 12.

◦ 각종 제반 용역 및 행정절차 완료             : `20. 3. ~ `23. 3.

- 소규모환경영향평가, 사전재해영향검토, 교통안전진단 등

◦ 편입토지 손실보상 산정 및 협의, 2차 재평가   : `21. 11. ~ `22. 12

- 편입109필지(1,846백만원) : 보상87필지(1,634백만원)78%, 미보상22필지(212백만원)

◦ 공사발주(조달청 계약심사 의뢰)               : `23. 8. 21.

◦ 지역개발사업구역 지정·고시                 : `23. 8. 25.

◦ 지역개발사업구역 실시계획 인가 고시	: `23. 11. 10.

□ 금후계획

◦ 공사 추진(1차분)	: `23. 12. ~

- 교량 1개소 및 토공작업 추진

◦ 공사 완료(1차분)	: `24. 12.

장기미집행 도시계획시설(도로) 편입부지 매입

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 양진석  담당자 : 신은숙 전화 : 6550

□ 추진근거

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조(공익사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 관내 일원

◦ 사업내용 : 도시계획도로 148개 노선

◦ 총사업비 : 20,176백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2020 ~ 2025(6개년)

◦ 사 업 비                                                   (백만원)

구 분	위치	계	기투자	2024	2025이후	사업기간
장기미집행 (도로)보상	관내	20,176	8,180	1,000	10,996	`20 ~ `25

□ 추진실적

◦ 타당성조사 및 실시계획 인가 용역           : `19. 9. 4. ~ `20. 12. 30.

◦ 실시계획 인가                             : `20. 5. ~ 6.

◦ 토지분할측량                              : `21. 3.

◦ 보상계획 열람공고 및 통보                 : `21. 4.

◦ 협의매수 추진(73건, 2,844백만원)           : `21. 5. ~ `23. 12.

(`21: 19건, 913백만원 / `22: 19건, 532백만원 / ``23: 35건, 1,399백만원)

□ 금후계획

◦ 편입토지 등 보상금 협의 및 지급           : `24. 1. ~

읍·면지역 도로망 정비사업(총괄)

□ 개    요

◦ 사업규모 : 도로 정비사업 11개 지구, L = 12.22㎞

◦ 총사업비 : 47,463백만원 (`24 : 9,800백만원/ 도비 200 시비 9,600)

◦ 사업기간 : 2017 ~ 2026년(10개년)

구 분	사 업 량(㎞)		사업기간	사업비(백만원)				추진상황
				계	기투자	2024	2025이후
계	11개지구	L=12.22	`17~ `26	47,463 (도비550)	24,063 (도비350)	9,800 (도비200)	13,550
□읍면지역 시도	2개지구	L=4.5	`17~ `26	21,313	11,463	3,300	6,550
	덕촌~황벌	2.00	`22 ~ `26	6,000	650	300	5,050	보상중(10%)
	평촌~강기	2.50	`17 ~ `25	15,313	10,813	3,000	1,500	공사중(40%)
□농어촌 도로	5개지구	L=5.37	`19~ `25	22,150	10,800	4,300	7,050
	덕 인 선	0.90	`22 ~ `25	4,000	450	1,000	2,550	보상중(10%)
	배 촌 선	2.97	`19 ~ `25	11,000	3,500	3,000	4,500	`24.1.착공예정
	도용선 (2지구)	0.2	`24	300	-	300	-	설계완료(100%)
	견 두 선 (갈촌~신덕)	0.8	`22 ~ `24	5,350	5,350	-	-	공사중(70%)
	일 대 선	0.5	`23 ~ `24	1,500	1,500	-	-	공사중(10%)
□통행불편	2개지구	L=1.55	`23~ `24	2,500	1,100	1,400	-
	이백 서동	1.0	`23 ~ `24	1,500	100	1,400	-	보상중(20%)
	아영 이동	0.55	`23 ~ `24	1,000	1,000	-	-	공사중(80%)
□위험도로 선형개선	2개지구	L=0.8	`23~ `24	1,500 (도비 550)	700 (도비 550)	800 (도비 550)	-
	주생 금풍	0.6	`23 ~ `24	1,100 (도비 550)	700 (도비 350)	400 (도비 200)	-	공사중(40%)
	아영 외지	0.2	`24	400	-	400	-	설계중(10%)

□ 읍·면지역시도 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 성월계  담당자 : 김한샘 전화 : 6532

□ 추진근거

◦「도로법」제6조(도로건설·관리계획의 수립 등), 5년단위 수립

- 남원시 도로건설·건설계획 고시(`22. 2. 18. / 남원시 고시 제2022-11호)

□ 개    요

◦ 계    획 : 20개 지구 / 38.46㎞ / 79,543백만원 (시비)

◦ 기 투 자 : 18개 지구 / 33.96㎞ / 58,230백만원

◦ 시 행 중 :  2개 지구 /   4.5㎞ / 21,313백만원 (`24년 : 3,300백만원)

- `25 완공 : 1개 지구 / `26 완공 : 1개 지구

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
				계	기투자	2024	2025이후
합 계		2개지구	4.5	21,313	11,463	3,300	6,550	54
덕촌~황벌		보절면, 덕과면	2.00	6,000	650	300	5,050	11	`22 ~ `26
평촌 ~ 강기	소 계	이백면	2.5	15,313	10,813	3,000	1,500	71	`17 ~ `25
	평촌 ~목가		0.70	6,413	6,413	-	-	100	`17 ~ `21
	목가 ~강기		1.80	8,900	4,400	3,000	1,500	49	`22 ~ `25

□ 추진실적

◦ 덕촌~황벌  : 용지보상 추진 중(62필지, 53명) / 보상률 10%

◦ 목가~강기  : 2차분 추진 중(`23. 4. 14. ~ `24. 2. 4.) / 공정률 40%

□ 금후계획

◦ 2025년 완료 : 1개 지구(목가~강기)

◦ 2026년 완료 : 1개 지구(덕촌~황벌)

□ 농어촌도로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 성월계  담당자 : 김한샘 전화 : 6532

□ 추진근거

◦「농어촌도로 정비법」제6조(도로기본계획의 수립), 5년단위 수립

- 남원시 농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 고시(`22. 2. 18. /남원시 고시 제2022-11호)

□ 개    요

◦ 계    획 : 27개 지구 / 29.05㎞ / 59,724백만원 (시비)

◦ 기 투 자 : 22개 지구 / 23.68㎞ / 37,574백만원

◦ 시 행 중 :  5개 지구 /  5.37㎞ / 22,150백만원 (`24년 : 4,300백만원)

- `24 완공예정 : 3개 지구 / `25 이후 완공 : 2개 지구

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2024	2025이후
합 계	4개지구	5.37	22,150	10,800	4,300	7,050	49
덕 인 선	사매면	0.90	4,000	450	1,000	2,550	11	`22 ~ `25
배 촌 선	주천면	2.97	11,000	3,500	3,000	4,500	32	`19 ~ `25
도용선 (2지구)	주생면	0.20	300	-	300	-	-	`24
견 두 선 (갈촌~신덕)	수지면	0.8	5,350	5,350	-	-	100	`22 ~ `24
일 대 선	아영면	0.5	1,500	1,500	-	-	100	`23 ~ `24

□ 추진실적

◦ 덕 인 선 : 용지보상 추진 중(50필지, 35명) / 보상률 10%

◦ 배 촌 선 : 용지보상(97필지, 67명)[보상률 76%], 공사 조달계약 중(`23. 12.)

◦ 도용선(2지구) : 토지 수용 완료(`23. 4.), 실시설계 용역 완료(`23. 10.)

◦ 견 두 선(갈촌~신덕) : 2차분 추진 중 / 공정률 70%

◦ 일 대 선 : 공사 착공 `23. 11. 6. / 공정률 10%

□ 금후계획

◦ 2024년 완료 : 3개 지구(도용선(2지구), 견두선(갈촌~신덕), 일대선)

◦ 2025년 이후 : 2개 지구(덕인선, 배촌선)

□ 통행불편 마을진입로 정비사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 성월계  담당자 : 김혜린 전화 : 6533

□ 추진근거

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

◦「농어촌도로 정비법」제5조(도로의 정비)

□ 개    요

◦ 계    획 : 60개 지구 / 32.73㎞ / 32,686백만원 (시비)

◦ 기 투 자 : 53개 지구 / 30.69㎞ / 28,186백만원

◦ 시 행 중 :  2개 지구 /  1.55㎞ /  2,500백만원 (`24년 : 1,400백만원)

- `24 완공 : 2개 지구

◦ 이후계획 :  5개 지구 /  1.01㎞ /  1,800백만원

사 업 명	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
		계	기투자	2024	2025이후
2개 지구	1.55	2,500	1,100	1,400	-	44
이백 서동마을	1.0	1,500	100	1,400	-	7	`23 ~ `24
아영 이동마을	0.55	1,000	1,000	-	-	100	`23 ~ `24

□ 추진실적

◦ 이백 서동 : 분할측량 및 용지보상 협의(39필지, 23명) / 보상률 20%

◦ 아영 이동 : 공사 추진 중 / 공정률 80%

- 일부 구간 용지보상 미협의에 따른 토지수용 행정절차 이행 중

□ 금후계획

◦ 2024년 완료 : 2개 지구(아영 이동, 이백 서동)

□ 위험도로 선형개선사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 성월계  담당자 : 김경준 전화 : 6534

□ 추진근거

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

◦「농어촌도로 정비법」제5조(도로의 정비)

□ 개    요

사 업 명	읍면	사업량 (㎞)	사업비(백만원)				투자율 (%)	사업기간
			계	기투자	2024	2025이후
합 계	2개지구	0.8	1,500 (도550)	700 (도350)	800 (도200)	-	47
주생 금풍	주생면	0.6	1,100 (도550)	700 (도350)	400 (도200)	-	64	`23 ~ `24
아영 외지	아영면	0.2	400	-	400	-	-	`24

□ 추진실적

◦ 주생 금풍 : 공사 시행 (`23. 6. ~ ‘24. 6.) / 공정률 40%

- 도로 법면 보강 및 선형개선

◦ 아영 외지 : 실시설계 추진(`23. 12.) / 공정률 10%

- S자 급커브구간 선형개선

□ 금후계획

◦ 2024년 완료 : 2개 지구(주생 금풍, 아영 외지)

시설물안전법 대상 교량․터널 관리사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 성월계  담당자 : 김경준 전화 : 6534

□ 추진근거

◦「시설물안전법」제11조(안전점검의 실시), 제12조(정밀안전진단의 실시)

◦「시설물안전법」제24조(시설물의 보수·보강 등)

◦「지진대책법」제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)

□ 개    요

사 업 명	사업대상	사업내용	사업비(백만원)			사업기간
			계	2023	2024
합 계			4,750 (특1,700)	3,650 (특1,400)	1,100 (특300)
보수․보강	2종 시설물 7개소	표면,단면 보수	1,600	1,300	300	`23
내진보강	기타 시설물 1개소	교량받침 교체	2,800 (특1,700)	2,200 (특1,400)	600 (특300)	`23
정밀안전점검	2종 시설물 5개	정밀안전점검	350	150	200	매년시행

□ 추진실적 – 15개소 / 3,650백만원

◦ 보수․보강 : 교량 총4개소 표면 및 단면 보수, 교면 포장 등 완료

- 남원대교, 승사교, 금송교, 산동교

◦ 내진보강 : 총3개소 내진보강 완료

- 남원터널(`23. 9.), 광석교(`23. 12.), 의총교(`23. 12.)

◦ 정밀안전점검 : 교량 8개소 점검 완료(`23. 11.)

-  밤치육교, 광석교, 춘향교, 동림교, 남원대교, 주송교, 이백교, 율천교

□ 금후계획 – 13개소 / 1,100백만원

◦ 공사 추진                                        : `24. 2. ~ 12.

- 보수․보강 : 7개소(밤치육교, 광석교, 춘향교, 동림교, 남원대교, 이백교, 율천교)

- 내진보강 : 1개소(축천교(상행))

- 정밀안전점검 : 5개소(승사교, 금송교, 산동교, 요천2교, 남원터널)

가로보안등 스마트 원격제어시스템 구축

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 김현호  담당자 : 태순진 전화 : 6455

□ 추진근거

◦ 남원시 조례 「남원시 가로등 보안등 설치 및 유지관리 조례」

□ 개    요

사 업 명	사업내용	사업비(백만원)			사업기간
		계	기투자	2024
가로보안등 스마트 원격제어시스템 구축	가로등양방향점멸기 (2,807개소)	2,187.5 (국875 시1,312.5)	1,393.5 (국557.4 시836.1)	794 (국317.6 시476.4)	`22 ~ `25

□ 추진실적

◦ 한국에너지공단 방문(`24년 사업 건의)	: `23.  3.  14.

◦ `24년 지역에너지절약사업 계획서 제출	: `23.  4.   6.

◦ `23년 지역에너지절약사업 확정통보	: `23.  4.  21.

◦ `24년 지역에너지절약사업 가내시	: `23.  9.  18.

◦ `23년 지역에너지절약사업 실시(가로보안등 스마트원격제어시스템 구축): `23.  5. ~ 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ (안정적인 시스템 구축) 가로보안등의 일관된 점·소등 가능 및 시민과 관광객에게 안정적인 밤거리 제공

□ 지속적인 국비확보로 가로보안등 스마트 원격 시스템 조기구축 추진

□ 금후계획

◦ 지역에너지절약사업 현장조사 및 설계	: `24.  1. ~ 3.

◦ 지역에너지절약사업 발주 및 사업완료	: `24.  4. ~ 9.

가로보안등 운영 및 유지관리

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 김현호  담당자 : 태순진 전화 : 6455

□ 추진근거

◦ 남원시 조례 「남원시 가로등 보안등 설치 및 유지관리 조례」

□ 개    요

사 업 명	사업내용	사업비(백만원)			사업기간
		계	기투자	2024
합 계		3,278	1,575	1,703
관광지 주변 가로등주 교체	관광지 주변 가로등주 100주	500	-	500	`24 ~ `28
가로보안등 신설	도시·농촌 보안등 315등	1,708.5	1,005	703.5
가로보안등 유지관리	유지보수 및 누전보수	1,069.5	570	499.5

□ 추진실적

◦ `23년 상반기 가로(보안)등 공사 추진	: `23.  1. ~  6.

◦ `23년 하반기 가로(보안)등 공사 추진	: `23.  7. ~ 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 『남원 시내권 관광시설 연계 야간경관 기본계획 수립용역』과 『남원시 미래 도시디자인 마스터 플랜 용역』의 결과에 따라 가로등주 디자인 설치 추진

◦ (가로보안등 신설) 신청지역 현장확인을 통한 우범·취약지구 우선선정

□ 주변여건을 고려, 가로등 추가 신설로 안전한 밤거리 조성

□ 금후계획

◦ `24년 상반기 가로(보안)등 공사 추진	: `24.  1. ~  6.

◦ 관광지 주변 가로등주 현장조사 및 공사 실시	: `24.  1. ~ 12.

◦ `24년 하반기 가로(보안)등 공사 추진	: `24.  7. ~ 12.

겨울철 도로 제설대책 추진

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 김현호  담당자 : 정승기 전화 : 6523

□ 추진근거

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

◦「도로의 유지·보수 등에 관한 규칙」제9조(재해대책)

□ 개    요

◦ 운영 기간 : 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15. (4개월간)

◦ 제설 대상 : 법정관리도로 총 57개 노선 431.5km

계		시 관리국도		지 방 도		시 도		읍면시도(군도)
노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량	노선수	작업량
57	431.5㎞	3	25.1㎞	8	154.9㎞	24	38.5㎞	22	213㎞

◦ 제설 인력  : 24명 (도로보수원 9, 운전원 9(자체 3, 용역 6), 기타 6(용역 6))

◦ 제설 차량  : 12대 (15톤 6(임차3), 5톤 2(임차1), 1톤 4(임차2))

◦ 제설 장비  : 353대

- 자체 보유 : 33대 (굴삭기2, 제설기 14, 살포기 14, 교반기 1, 저장탱크 1, 호이스트 1)

- 읍 면 동 : 320대 (트랙터용제설기 316, 1톤용 제설기 4)

◦ 제설자재(10일 사용 가능분 / 일평균 250톤)

- 보  유  량 : 총 2,559톤(염화칼슘 213톤, 소금 2,256톤, 친환경제설제 90톤)

※ 재고량 감안하여 `24년 1월 추가 구입 예정(`24년 예산 350백만원 확보)

□ 추진실적

◦ 설해대책 추진계획 수립                         : `23. 10. 23.

◦ 제설장비 점검 및 상습결빙지역 사전준비        : `23. 10. ~ `23. 11.

- 제설장비(제설기, 살포기) 부착 및 작동상황 점검 완료

- 제설작업 시행 : `23. 11. 18. (적설량 7.3cm, 대설주의보 발효)

- 참고 : `22. 12. ~ `23. 02. 도로 제설작업 추진 (11회)

◦ 도로 통제(육모정~고기삼거리, 고기삼거리~달궁삼거리)          : `23. 12. 01. ~ `24. 3. 31.

◦ 제설차량 임차 (6대 / 15톤 3대, 5톤 1대, 1톤 2대)   : `23. 12. 01. ~ `24. 2. 29.

□ 금후계획

◦ 제설장비 구입(염수저장고 ․ 교반기 ․ 15톤덤프 각 1대)  : `24. 01. ~ 02

도로 유지관리 사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과  부서장 : 박준기  팀장 : 성월계  담당자 : 김혜린, 김성현 전화 : 6533, 6535

□ 추진근거

◦「도로법」제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등)

◦「농어촌도로 정비법」제5조(도로의 정비)

□ 개    요

사 업 명	사 업 량	사업비(백만원)			비 고
		계	2023	2024
합 계		7,622	3,602	4,020
읍면지역시도 유지관리	주민참여예산 10개소 소규모 민원 4개소	1,072	522	550
농어촌도로 유지관리사업	유지관리사업 14개소	1,200	700	500
법정도로 시설 유지관리	유지관리사업 15개소	5,350	2,380	2,970

□ 추진실적 - 66개소 / 3,547백만원

◦ 읍면지역시도 유지관리

- 사촌마을 진입로 아스콘 재포장공사 등 14개소 493백만원 추진

◦ 농어촌도로 유지관리

- 시도 19호선(아영 아백로) 외 6개지구 인도정비공사 등 31개소 679백만원 추진

◦ 법정도로 유지관리(도로 유지관리, 재포장 등)

- 대강 방동 도로측구 정비공사 등 21개소 2,375백만원 추진

□ 금후계획

◦ 24년 읍면동 주요도로 일제점검 결과 보고           : `24. 01.

- 도로시설물 파손, 노면 재포장, 배수불량, 인도정비, 기타 도로보수 등이 필요한 지점

◦ 사업대상지 선정 및 실시설계용역                   : `24. 01. ~ 03.

◦ 유지관리 사업 추진                                : `24. 03. ~ 12.

2024년도 유관기관 투자사업 계획(도로)

기관명	사업명	사업량 (km)	사업비(백만원)					비고 (기간)
			총사업비	기투자	‘23투자	‘24예산	이후
합계	12개 사업	42.18	322,500	3,903	4,925	8,050	305,622
익산청	소계(4개 사업)	21.8	232,000	2,301	1,925	3,200	224,574
	국 지 도 60호 (주천 ~ 고기) 시설개량	5.9	94,100	1,901	878	1,000	90,321	`21~`25
	국 도 24호 (이백~운봉) 시설개량	4.9	48,000	400	847	1,000	45,753	`22~`26
	국지도37호 (인월~아영) 시설개량	7.0	45,300	-	200	1,000	44,100	`23~`27
	국도24호 (대강~대산) 시설개량	4.0	44,600	-	-	200	44,400	`24~`28
전북도 도로 공항 철도과	소계(2개 사업)	12.38	84,400	1,202	2,000	2,000	79,198
	대강~금지 지방도 확포장공사(730호)	7.78	47,600	987	1,000	1,000	44,613	`21~`25
	삼계~오수 지방도 확포장공사(745호)	4.6	36,800	215	1,000	1,000	34,585	`21~`25
전 라 북 도 도 로 관 리 사업소	소계(6개 사업)	8.0	6,100	400	1,000	2,850	1,850
	위임국도 13호 대강 수홍 오르막차로	1.30	2,400	200	200	1,000	1,000	`22~`25
	국지도60호(남원 매봉) 위험도로 구조개선	0.3	1,400	-	400	600	400	`23~`25
	국지도60호(남원 산정) 소규모 구조개선	0.3	500	-	-	50	450	`24~`25
	지방도 861호(산내 장항) 위험도로 구조개선	0.1	600	200	400	-	-	`20~`24
	국지도 60호선 안전 시설정비사업	4.0	800	-	-	800	-	`24
	지방도 737호선 안전시설 정비사업	2.0	400	-	-	400	-	`24

※ 남원국토관리사무소 : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(′23~′27)사업

남원시 7개사업 반영되어 ′25년 이후 순차적으로 사업 추진 예정

요천 지역맞춤형 통합하천사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 채윤호  담당자 : 박상현 전화 : 6543

□ 추진근거

◦ 환경부『지역맞춤형 통합하천사업』공모사업 선정(22개소)

◦『명품하천 조성 업무협약』체결(영산강유역환경청 ↔ 남원시 / `23.7.)

□ 개    요

◦ 위    치 : 신촌동(상수원 취입보) ~ 송동면 장국리(광치천 합류부)

◦ 사업내용 : 요천 친수시설 사업 L=5.65㎞

- 시민공원, 포차거리, 승사교 하류 둔치 조성, 필터가든 등

◦ 총사업비 : 250억원(시비)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2027(5개년)

□ 추진실적

◦ 공모사업 최종선정(환경부 / 22개소)	: `22. 12. 22.

◦ 유관기관(환경부, 전북도, 영산강청) 방문 협의(10회)	: `23.  2. ~

◦ 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진	: `23.  3. 28. ~

◦ 시의회 용역 현안 보고	: `23.  9. 22.

◦ 기본 및 실시설계용역(총괄분) 발주	: `23. 10. 12.

- 과업 : 요천 친수사업, 요천로 공원화 용역비 : 1,932백만원, 기간 : 12개월

□ 쟁점 및 대책

◦ 친수시설 사업비 자체재원 부담 해소를 위한 도비 확보 노력

□ 당초 전북도 지방비 매칭 부담액 도비 73억원(15%) 지원 요구 대응

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 추진	: `24.  1. ~ 12.

◦ 행정절차 이행(관련법 협의, VE, 건설기술심의 등)	: `24.  9. ~ 12.

◦ 공사 추진	: `25. 1. ~ `27. 12.

광한루원 앞 도로환경 개선사업

(계속사업)

작성부서 : 건설과 부서장 : 박준기  팀장 : 채윤호  담당자 : 박상현 전화 : 6543

□ 추진근거

◦『남원읍성권 정비 및 활용계획(문화예술과)』반영(`23.12.)

◦ 민선 8기 공약사업(공약 3-5) 반영

-“축제와 빛의 향연을 활용한 문화축제 테마 조성”

□ 개    요

◦ 위    치 : 요천로 일원(승사교 ~ 십수정)

◦ 사업내용 : 도로 다이어트 L=700m(4차로 ⇒ 2차로) 및 상부 공원화

◦ 총사업비 : 50억원(시비)

◦ 사업기간 : 2023 ~ 2027(5개년)

□ 추진실적

◦ 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수	: `23.  3. 28.

- 지하차도 기본계획(안) 마련 / 교통량 조사 및 도로 이용체계 분석

◦ 용역 착수/중간 보고회 개최	: `23. 4. 13. / 8. 24

◦ 한국지방재정연구원(LIMAC) 사전 컨설팅 실시	: `23.  9.  8.

□ 쟁점 및 대책

◦ (공원화 최적 대안 도출) 장래 교통량 및 경제성 분석(B/C)을 통한 광한루원 앞 공원화를 위한 적정 개발안 도출 추진

◦ (시민공감) 주차공간 축소 및 도로 체계 변화에 따른 주변 상가 포함 다수 민원 발생 예상

□ 시정 설명회, 찾아가는 현장 시장실 등을 통해 시민 공감대 형성 지속 노력

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 추진(요천 통합하천 설계용역 포함)	: `24.  1. ~ 12.

◦ 문화재청 협의 추진	: `24.  1. ~ 3.

◦ 공사 추진	: `24. 10. ~ `27. 12.

육상골재채취 허가 및 관리

(계속사업)

작성부서: 건설행정팀  부서장: 박준기  팀장: 김현호  담당자: 양정우 전화: 6528

□ 추진근거

◦ 「골재채취법」제22조(골재채취의 허가), 같은법 제29조(골재채취의 복구

□ 현    황

◦ 육상골재채취 허가 – 11개 지구 (채취중 3, 복구중 8)

연번	위 치	허 가 내 용 (면적㎡/채취량㎥)		허가 기간	신 청 자	복구예치금 (천원)	비 고
	합 계 (11개 지구)	144,230.7
		253,820
1	운봉읍 준향리 826-9번지 외 1필지	면 적:	4,022	2018. 4. 19. ~ 2024. 4. 30.	(유)금성산업개발 황필승	153,197 증권	복구중
		채취량:	3,620
2	사매면 인화리 679-2번지 외 9필지	면 적:	22,404	2019. 4. 19.~ 2021. 12. 31.	(유)삼창산업 윤영탁	473,490 증권	복구중
		채취량:	47,640
3	광치동 525-3번지 외 5필지	면 적:	8,080	2020. 3. 24.~ 2022. 12. 31.	(유)신광개발 이종신	139,515 증권	복구중
		채취량:	18,276
4	사매면 인화리 676-1번지 외 8필지	면 적:	16,927	2020. 7. 28.~ 2022. 6. 30.	(유)경희산업 채경숙	214,279 중권	복구중
		채취량:	20,130
5	사매면 오신리 872번지 외 11필지	면 적:	30,304	2021. 2. 4.~ 2023. 5. 30.	(유)선진산업개발 송한주	302,117 중권	복구중
		채취량:	21,850
6	주천면 주천리 1197번지 외 3필지	면 적:	7,730	2021. 7. 7.~ 2023. 6. 30.	㈜황금개발 김공원 외 1	459,668 중권	복구중
		채취량:	19,629
7	주천면 주천리 1128번지 외 4필지	면 적:	15,336	2021. 10. 5.~ 2024. 12. 31.	(유)선진산업개발 송한주	442,100 중권	채취중
		채취량:	21,439
8	덕과면 덕촌리 878번지 외 3필지	면 적:	7,555	2021. 12. 16.~ 2023. 12. 31.	(유)미영진개발 김승희	220,495 증권	복구중
		채취량:	20,668
9	보절면 진기리 1505-8번지 외 3필지	면 적:	6,719.7	2022. 2. 4.~ 2022. 12. 31.	(유)모아산업 조정숙	148,104 증권	복구중
		채취량:	15,894
10	대산면 옥율리 821-1번지 외 2필지	면 적:	7,916	2022. 11. 25.~ 2023. 12. 31.	(유)신화산업개발 박양제	329,248 증권	채취중
		채취량:	15,354
11	내척동 428번지 외 17필지	면 적:	17,237	2023. 11. 20.~ 2024. 12. 31.	금강건재산업(유) 김창환	943,000 증권	채취중
		채취량:	49,320

부   록

국도·국지도 건설 5개년 계획(`21~`25) 사업

(계속사업)

□ 개    요

구 분	노선번호	사 업 명	연 장 (㎞)	총사업비 (억원)	예산요구현황(억원)				비고
					기투자	‵23	‵24	이후
합 계	3개 노선	4개 사업	21.8	2,320	23.01	19.25	32	2,245.74
국 도	24호선	이백 ~ 운봉(여원재) 시설개량	4.9	480	4	8.47	10	457.53	설계중
		대강 ~ 대산(비홍재) 시설개량	4.0	446	-	-	2	444
국지도	37호선	인월 ~ 아영 2차로 확장 및 개량	7.0	453	-	2	10	441	설계중
	60호선	주천 ~ 고기 시설개량	5.9	941	19.01	8.78	10	903.21	설계중

□ 추진실적

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 사업 반영 건의    : `17. 12. ~

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획(`21~ `25) 용역  : `18. 6. ~ `20. 6.

- 발주 : 국토부 도로건설과, 용역사 : 국토연구원, 기간 : `18.6.~`20.6.(2개년)

◦ 제1차 대상지 사업 선정(국토부) - 4개사업             : `20.  1.

◦ 일괄 예비 타당성 조사 추진(기재부 / KDI)                : `20. 2. ~ ‵21. 9.

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 확정 고시(국토부)  : `21. 10. 1.

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 설계용역                      : `21. 11. ~ ‵24. 8.

- 용역비 3,338백만원(기투자 1,901백만원, ‵23년 878백만원/익산청 시행)

◦ 국도 24호선(이백~운봉) 설계용역                        : `22. 7. ~ `24. 8.

- 용역비 1,250백만원(기투자 400백만원, ‵23년 847백만원/익산청 시행)

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 남원시 관계부서 협의(2회)      : `22. 7. / 9.

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 주민설명회                    : `22. 9. 23.

◦ 국도 24호선(이백~운봉) 주민설명회                      : `22. 12. 27.

◦ 국지도 37호선(인월~아영) 설계용역                      : `23. 4. ~ `24. 10.

- 용역비 1,126백만원(‵23년 200백만원/익산청 시행)

□ 금후계획

◦ 국도 24호선(대강~대산) 설계용역 착수                : `24. 4.

◦ 국지도 60호선(주천~고기) 설계용역 완료              : `24. 8.

◦ 국도 24호선(이백~운봉) 설계용역 완료                : `24. 8.

◦ 국지도 37호선(인월~아영) 설계용역 완료              : `24. 10.

국지도 60호선(주천~고기) 시설개량공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 이백면 효기리 ~ 주천면 고기리 / 국지도 60호선

◦ 사업내용 : 2차로 시설개량 L=5.9㎞, B=10m, 교량4개소 445m, 터널2개소 1,585m

◦ 사 업 비 : 941억원(국비 628, 도비 313)
◦ 사업기간 : 2022 ~ 2026(5개년)

◦ 시행기관 : 익산지방국토관리청 도로계획과

□ 추진실적

◦ 제5차 국도․국지도 건설 5개년 계획 확정 고시(국토부) : `21. 10.  1.

◦ 기본 및 실시설계용역 추진                         : `21. 11. ~ `23. 8.

- 국립공원 통과노선 불가(환경부)로 국립공원 우회한 터널 노선 반영

◦ 노선(안) 주민설명회(주천면)                       : `22.  9. 23.

◦ 전략환경영향평가 용역 착수 및 협의회 구성        : `23.  9. ~

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계용역 완료                     : `24.  8.

◦ 편입용지보상 및 사업 추진                      : `24.  9. ~ `26. 12.

지방도 730호선 대강~금지간 확포장공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 대강면 방동리 ~ 금지면 상귀리 일원 / 지방도 730호선

- 노 선 : 방동교차로 ~ 섬진강 자전거 쉼터 ~ 청계동교 ~ 상귀교차로

◦ 사업내용 : 도로 확포장 L=7.78㎞, B=9.5m(2차로) / 교량 6개소

◦ 사 업 비 : 476억원(도비)
◦ 사업기간 : 2021 ~ 2026(6개년)

◦ 시행기관 : 전라북도 도로공항철도과

□ 추진실적

◦ 제3차(‘21 ~ ‘25) 전북도 도로건설․관리계획 반영(1순위)   : `20. 12.

◦ 타당성 평가 용역 추진(전북도)                        : `21.  2. ~  7.

┌ 타당성 평가 : 300억원 이상(국가통합교통체계효율화법)

└ 타당성 조사 : 500억원 이상(건설기술진흥법)

◦ 주민설명회 개최(주민 40명 참석)	: `21.  5. 11.

◦ 대강면 주민 의견 수렴 결과 회신(대강면 → 건설과)    : `21.  5. 17.

◦ 도로 노선(안) 우리시 협의 의견 회신(시   → 전북도)   : `21.  5. 18.

- 도로 노선 안에 대한 대강면 주민설명회 결과 사석마을(면소재지)을 경유하지 않는          우회 노선 건의

◦ 타당성평가 검증 통과 (전북도 → 국토부 / 교통투자평가협의회) : `21.  7.

◦ 실시설계용역 착수(도급액 : 1,212백만원)              : `21. 12. 24.

◦ 주민설명회(대강, 금지)                               : `22.  3. 23.

◦ 남원시 관계부서 협의(2회)                            : `22.  1. / 10.

◦ 실시설계용역 도급업체 부도에 따른 용역 중지        : `23. 10.

□ 금후계획

◦ 실시설계용역 (재)추진                         : `24. 3. ~ 10.

◦ 용지보상 및 사업추진                         : `24. 11. ~ `26. 12.

천왕봉대로 개설 사업

□ 위 치 도

농협4가

풍천교

도로확‧포장

L=386m,B=25m

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	인월면 인월리 농협 사거리 ~ 풍천교	대로 3-201호
사업기간	2020 ~ 2024년 (5년)
총사업비	2,500백만원(시비 2,500)
사업내용	도로 정비 L=386m, B=25m
추진상황	공사 착공(1차분)	`24. 12.

교룡 중·소로 개설사업

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	향교동 일원(교룡초 ~ 영락교회)	중로 2-35호 소로 2-32호
사업기간	2023 ~ 2025년 (3년)
총사업비	4,600백만원(시비 4,600)
사업내용	도로 개설 L=0.41km, B=7~15m 인도교‧회전교차로 각 1식
추진상황	- 실시설계 용역 추진 편입토지 및 지장물 협의 매수 추진중	`23. 02. ~ `23. 12. `22. 06. ~ 현재

도통동 중·소로 개설공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	월락동 85번지 일원	중로 2-33호 소로2-189호
사업기간	2024 ~ 2026년 (3년)
총사업비	3,000백만원(시비 3,000)
사업내용	도로 개설 L=0.77km, B=6~15m
추진상황	실시설계용역 추진	`24. 1. ~

동문로 안전한 보행환경

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	동충동 현대아파트 ~ 동문사거리	중로 3-1호
사업기간	2024(1개년)
총사업비	500백만원(시비 500)
사업내용	보행로 조성 및 배수로 정비 L=0.8km
추진상황	- 실시설계용역 추진	`24. 1. ~ 4.

윗정재마을 진입로 정비사업

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	신정동 573-3번지 일원
사업기간	2024년(1개년)
총사업비	500백만원(시비 500)
사업내용	도로 정비 L=0.1km, B=6m
추진상황	실시설계용역 추진	`23. 10. ~

신촌 안길  소방도로 개설공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	신촌동 235-1번지 일원
사업기간	2024년 (1년)
총사업비	300백만원(시비 300)
사업내용	도로 개설 L=180m, B=6m
추진상황	실시설계용역 추진	`23. 10. ~ `24. 2.

내척길 진입로 개설공사

□ 위 치 도

사업대상지

인도

가변차로

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	용정동 760번지 일원	중로 1-13호
사업기간	2024년 (1년)
총사업비	150백만원(시비 150)
사업내용	인도(L=180m) 및 가변차로(L=50m) 설치
추진상황	실시설계용역 추진	`23. 10. ~ `24. 2.

그린뉴딜(운봉초·중) 어린이통학로 지중화 사업

□ 위 치 도

전선지중화

L=1,100ⅿ

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	운봉읍 동천리 ~ 서천리	중로 3-101호 중로 2-102호
사업기간	2023 ~ 2024년 (2년)
총사업비	2,895백만원(국비 528)	한전/통신 부담 1,247백만원
사업내용	지중화 및 인도 정비 L=1.1㎞
추진상황	실시설계용역 추진	`23. 12. ~ `24. 3.

고죽동 노인복지센터 지중화 사업

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	고죽동 83-2 일원	대로 1-3호
사업기간	2022 ~ 2024년 (3년)
총사업비	2,620백만원	한전/통신 부담 960백만원
사업내용	지중화 및 인도 정비 L=200m
추진상황	관련기관 협의 공사중지	`23. 12. 4.

LX드론활용센터 지중화 사업

□ 위 치 도

전선지중화

L=200ⅿ

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	주생면 주동리 114-4 ~ 404-3	대로 1-3호
사업기간	2022 ~ 2024년 (3년)
총사업비	879백만원	한전/통신 부담 279백만원
사업내용	지중화 및 인도 정비 L=430m
추진상황	관련기관 협의 공사중지	`23. 12.

덕촌~황벌 도로 확포장공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	덕과면 덕촌리 ~ 보절면 황벌리 일원	읍면시도 22호선
사업기간	2022 ~ 2026(5개년)
총사업비	6,000백만원(시비 6,000)	`24년 300백만원
사업내용	도로 확포장 L=2.0km, B=8.0m
추진상황	- 실시설계 용역 완료(‵22.2.~‵23.6) - 주민설명회(덕과‵23.5.15. 보절‵23.5.19.) - 관련 기관 협의(‵23.7.~‵23.12) 분할측량 및 용지보상 협의 추진(‵23.12.~) (총 62필지, 보상률 10%)	`24년 8월 착공예정

평촌~강기 도로 확포장공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	이백면 평촌리 ~ 양가리 일원	읍면시도 6호선
사업기간	2017 ~ 2025(6개년)
총사업비	15,313백만원(시비 15,313)	`24년 3,000백만원
사업내용	도로 확포장 L=2.47km, B=12.25m~14.85m
추진상황	- 목가~강기 구간 2차분 공사 추진 (공정률 40% / 보상률 82%) ※ 우회로 과속카메라 설치에 따른 공사 중지 중	`24. 6월 완료예정 (2차분)

덕인선 농어촌도로 확포장공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	사매면 인화리 ~ 월평리 일원	사매면 농어촌도로 면도 101호선
사업기간	2022 ~ 2025(4개년)
총사업비	4,000백만원(시비 4,000)	`24년 1,000백만원
사업내용	도로 확포장 L=0.9km, B=8.0m
추진상황	- 주민설명회(‵22.6.22.) - 실시설계 용역 완료(‵23.12.) 분할측량및용지보상협의 추진(‵23.12.~) (총 50필지, 보상률 10%)	`24년 5월 착공예정

배촌선 농어촌도로 확포장공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	주천면 배덕리 ~ 송치리 일원	주천면 농어촌도로 리도 210호선
사업기간	2019 ~ 2025(7개년)
총사업비	11,000백만원(시비 11,000)	`24년 3,000백만원
사업내용	도로 확포장 L=2.97km, B=8.0m
추진상황	- 용지보상 중 (총 97필지, 보상률 79%) - 계약심의회 완료(‵23.5.15) - 조달청 계약 의뢰(‵23.11.~)	`24년 1월 착공예정

도용선(2지구) 농어촌도로 확포장공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	주생면 내동리 일원	주생면 농어촌도로 농도 301호선
사업기간	2024(1개년)
총사업비	300백만원(시비 300)	`24년 300백만원
사업내용	도로 확포장 L=0.2km, B=8.0m
추진상황	- 도용선 1공구 공사 완료(‵19~‵22) - 미편입토지 토지수용 완료(‵23. 3. 14.) 실시설계용역 완료((‵23. 3. 10.)	`24년 2월 착공예정

견두선 농어촌도로 확포장공사

□ 위 치 도

1지구 L=0.8km

(갈촌마을~신덕마을)

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	남원시 수지면 유암리 ~ 고평리 일원	수지면 농어촌도로 면도 103호선
사업기간	2018 ~ 2028(1개년)
총사업비	18,000백만원(시비 18,000) 1공구(갈촌~신덕) : 5,350백만원	`23년 사고이월사업
사업내용	도로 확포장 L=4.0km, B=7.5m 1공구(갈촌~신덕) : L=0.8km, B=7.5m
추진상황	- 1지구(갈촌~신덕) 2차분 공사 추진 (공정률 70% / 총 52필지 보상률 94%)	`24. 8월 완료예정

일대선 농어촌도로 확포장공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	아영면 의지리 일원	아영면 농어촌도로 농도 315호선
사업기간	2023 ~ 2024(2개년)
총사업비	1,500백만원(시비 1,500)	`23년 사고이월사업
사업내용	도로 확포장 L=0.5km, B=8.0m
추진상황	실시설계용역 완료(‵23. 2.) 용지보상 및 관련 행정절차 이행(‵23. 2. ~ 10.) 공사 추진 중(공정률 10% / 총 36필지 보상률 90%)	`24. 6월 완료예정

이백 서동마을 진입로 정비공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	이백면 척문리 일원	이백면 농어촌도로 리도 203호선
사업기간	2023 ~ 2024(2개년)
총사업비	1,500백만원(시비 1,500)	`23년 1,400백만원
사업내용	도로 확포장 L=1.0km, B=7.0m
추진상황	주민설명회 개최(‵23. 9. 21.) 실시설계용역 완료(‵23. 10.) 용지보상 및 관련 행정절차 이행(‵23. 11. ~ ‵24. 02.) (총 39필지, 보상률 20%)	`24년 3월 착공예정

아영 이동마을 진입로 정비공사

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	아영면 의지리 일원	아영면 농어촌도로 농도 315호선
사업기간	2023 ~ 2024(3개년)
총사업비	1,000백만원(시비 1,000)	`23년 사고이월사업
사업내용	도로 확포장 L=0.5km, B=8.0m
추진상황	실시설계용역 완료(‵22. 12.) 용지보상 및 관련 행정절차 이행(‵23. 1. ~ 3..) 공사 추진 중(공정률 80% / 총 7필지 보상률 30%)	`24년 6월 완료예정

주생 금풍 위험도로 구조개선사업

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	도산지구 : 주생면 도산리 산 25-24 일원 낙동지구 : 주생면 낙동리 산 15-6 일원	1공구 : 면도 102호선 2공구 : 면도 105호선
사업기간	2023 ~ 2024(2개년)
총사업비	1,100백만원(도비 550, 시비 550)	`24년 400백만원 (도비 200, 시비200)
사업내용	도로 확포장 L=0.6km, B=8.0m
추진상황	실시설계용역 완료(‵23. 3.) 용지보상 및 관련 행정절차 이행(‵23. 3. ~ 5..) 공사 추진 중(공정률 40%)	`24년 6월 완료예정

아영 외지 위험도로 구조개선사업

□ 위 치 도

□ 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	아영면 갈계리 일원	읍면시도 19호선
사업기간	2024(1개년)
총사업비	400백만원(시비 400)	`24년 400백만원
사업내용	위험도로 선형개량 L=0.2km, B=8.0m
추진상황	- 2023년 시민공감 열린대화 건의 - 실시설계용역 추진(‵23.12.~)	`24년 3월 착공예정