2024. 1.

2024년 주요업무 계획

환경사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2023년 주요업무 결산

□ 2024년 중점 추진방향

□ 2024년 주요업무 계획

◦ 물 재이용 관리계획 수립용역

◦ 산내 부운 공공하수처리시설 설치

◦ 노암 노후 하수관로 정비사업

◦ 하수도 세입재원 확충

◦ 남원처리구역 하수관로 정비사업

◦ 아영 인풍지구 하수관로 정비사업

◦ 일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

◦ 운봉지구 하수관로 정비사업

◦ 남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업

◦ 사매 대율지구 마을하수도 설치사업

◦ 수지 용강지구 마을하수도 설치사업

◦ 남원 스마트하수처리장 구축사업

◦ 남원공공하수 및 소규모처리시설 관리대행 사업

일  반  현  황

□ 기    구

			환경사업소장
			황 도 연
하수경영팀장			하수시설팀장			하수처리팀장
유 홍 규			김 덕 곤			노 치 호
∘행정 종합계획 수립 ∘ 공기업특별회계 운영·관리 (입찰, 계약, 지출, 결산, 예산 등) ∘공공시설물 관리 ∘ 하수도요금 부과징수 및 현실화 ∘ 하수도 경영평가 및 실태점검 ∘요천생태습지공원 관리 ∘물재이용시설 관리			∘하수도정비 기본계획 수립 ∘하수관로 정비사업 추진 (남원처리구역외 5곳, 운봉지구 등) ∘하수중계펌프장 관리 ∘ 하수도 유지관리 및 긴급보수 ∘ 배수설비 설치 신고 및 관리 ∘ 하수도 원인자부담금 부과·징수 ∘ 하수관로 GIS DB 구축 및 관망도 정비			∘하수처리 종합계획 수립 ∘ 남원하수 ․ 분뇨 ․ 음식물처리시설 관리대행 감독 ∘ 슬러지처리시설 관리대행 감독 ∘ 운봉 ․ 인월 ․ 소규모하수처리장 관리대행 감독 ∘ 소규모마을하수시설 개량사업 ∘ 하수처리장 기술진단 및 악취기술진단 ∘ 하수처리장 구조물, 전기설비 정밀진단 ∘ 남원 ․ 운봉 ․ 인월하수처리장 수질TMS 관리

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비 고
정 원	21	1	3	6	7	4	청 경 2 환경관리원 3 공 무 직 5
현 원	19	1	7	4	5	2	청 경 1 환경관리원 3 공 무 직 5
증 감	△2	-	4	△2	△2	△2

2023년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 전문성 확보를 위한 남원공공하수·분뇨·음식물처리시설 관리대행 추진 ◦ 하수처리 노후시설물 개선 및 안정적 운영으로 수질 환경 보전 ◦ 소규모마을하수처리시설 관리대행으로 농촌마을 하수처리환경 개선 ◦ 효율적 하수도 특별회계 운영 및 요천생태습지 공원 관리 ◦ 하수도시설 지속적 공사추진으로 인프라 확충 및 주거환경 개선

□ 하수도 인프라 확충 및 주거환경 개선

◦ 지속적인 하수관로 사업 추진으로 하수도 보급률 향상(92.3%)

정비사업 대상	사업량	대상가구	사업비(백만원)	공정률	비고
합 계	115.4km	3,853	121,289
남원[3단계] 하수관로	37.7km	1,975	37,818	100%
남원처리구역 하수관로	27.0km	664	27,253	13.1%
아영 인풍지구 하수관로	20.5km	473	19,556	8.93%
산내지구 하수관로	7.3km	228	8,527	100%
남원일반산업단지 주변마을	6.7km	99	7,735	70.94%
운봉지구 하수관로	8.2km	200	8,700	설계용역	신규
농어촌마을 하수관로	4.5km	-	6,300	설계용역	신규
사매 대율지구 하수관로	2.1km	105	3,000	설계용역	신규
수지 용강지구 하수관로	1.4km	109	2,400	설계용역	신규

◦ 체계적인 하수관로 구축을 위한 하수도정비 기본계획(변경)수립 추진

◦ 국‧도비 확보 : 부운 하수처리시설 설치(145억원), 노암 하수관로 정비(150억원)

□ 안정적인 하수처리장 운영으로 수질 환경 보전

◦ 남원공공하수․분뇨․음식물처리시설 관리대행으로 전문성 확보

◦ 인공지능 제어․계측기능을 갖춘 스마트 하수처리장 구축(40억원)

◦ 실시간 수질원격감시제어 시스템(TMS) 운영 : 3개소(남원, 운봉, 인월)

◦ 하수슬러지를 유기성고형연료로 전환처리하여 한국중부발전소 연료 공급

◦ 하수처리 효율개선 기술진단 : 12개소/ 346백만원

◦ 노후 하수처리 시설물 정비 추진 : 42건/ 110백만원

□ 농촌 마을 하수처리 환경개선

◦ 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진으로 안정적 수질관리

- 주천면 내기 하수처리장 전면 개량 : 30㎥/일, 600백만원

◦ 민간 관리대행을 통한 전문성 확보 : 하수처리장 64, 중계펌프장 75

◦ 노후화시설 정비로 효율적이고 체계적인 환경기초시설 운영

◦ 낙동강수계기금사업 성과평가 하수처리 운영분야“우수관리청”선정

□ 악취 원인 분석 및 근무환경 개선

◦ 음식물류폐기물처리시설 악취저감시설 점검 추진 : 3~4월/ 17백만원

- 악취저감시설 내 필터, 안개분무장치, 약품공급배관 보수

◦ 현장근무자 편의시설 공사(샤워실, 찜질방, 휴게실 등) : 2~6월/ 110백만원

□ 경쟁력 있는 하수도 공기업 운영․관리

◦ 하수도요금 및 원인자부담금 부과․징수로 하수도 세입재원 확충(45억원)

◦ 하수도요금 현실화 추진 및 공기업특별회계 안정적 운영(345억원)

◦ 소형 빗물이용시설 설치 지원사업(17개소) : 빗물 16, 하수처리수 1

◦‘23년 공공하수도 운영관리 실태점검“우수지자체 발전상”수상

□ 환경기초시설 인식 전환프로그램 추진 및 생태복원 체험장 운영

◦ 유아, 초․중․고등학생 대상 하수처리장 견학 프로그램 운영 : 16회

◦ 요천생태습지공원 및 애견놀이터 운영관리 : 145,298㎡

- 방문객 현황 : ‵21년 26,113명 < ‵22년 30,993명 < ‵23년 28,633명(11월 기준)

- 생태탐방로, 수생식물 관찰데크, 취사구역 등 지속 운영관리

- 반기별 방문객 만족도 조사를 통한 의견수렴 및 시설개선 추진

	보완 필요사항
◦ 체계적인 하수도정비 기본계획 변경 수립 및 국가예산 확보 ◦ 지속적인 하수시설 공사를 통한 주거환경 개선 및 삶의 질 제고 ◦ 인공지능 제어·계측기능을 갖춘 스마트 하수처리장 구축 ◦ 하수처리장 관리대행에 따른 행정인력 재배치로 업무효율 도모 ◦ 시민의견을 반영한 생태습지공원 정비 및 보강으로 여가힐링 공간제공

2024년 중점 추진방향

수질개선 SOC 확충을 통한 안정적인 하수처리

	중 점 추 진 과 제
◦ 하수도 세입재원 및 국가예산 확보를 통한 하수도 사업 확대 추진 - 하수도 수용가 전수조사를 통한 누락 사용료 부과․징수 - 체납자 독촉고지 및 압류처분 등을 통한 미납세입 확보 - 국가예산 확보를 통한 하수도 신규사업 추진 □ 노암 하수관로 정비사업, 부운 공공하수처리시설 설치 ◦ 하수처리시설 정비를 통한 지역주민 하수도 복지실현 및 정주여건 개선 - 하수관로 정비사업 지속 추진 □ 남원처리구역, 아영 인풍지구, 일반산업단지 주변마을 하수관로 정비 - 농어촌 취약지역, 소외지역 하수관로 정비사업 진행 □ 운봉, 사매 대율, 수지 용강, 농어촌 마을하수도 정비사업 - 소규모 마을하수처리시설 개량사업 추진 □ 보절 양촌, 주천 내기, 산내 대정, 수지 호곡 마을하수처리시설 개량 ◦ 공공하수처리시설(남원하수, 분뇨, 음식물) 관리대행을 통한 전문화 - 전문적인 민간업체에 시설 운영 관리대행으로 수질 서비스 질 상승 - 효율성 증대에 따른 에너지 절감 및 시설 유지비용 감소 ◦ 하수처리장 스마트화로 빅테이터를 활용한 자동화 운영체계 구축 - 하수처리 운영방식 최적화로 안정적 방류수질 확보 및 운영비 절감 - 과학적 측정 및 빅데이터를 활용하여 사전예측 및 수질오염 예방

2024년 주요업무 계획

물 재이용 관리계획 수립용역

(신규사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 유홍규  담당자: 박인진  전화 : 5803

□ 개    요

◦ 법적근거 : 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」제6조

◦ 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 646백만원(시비 646)

◦ 계획기간 : 20년, 5년단위 타당성평가 실시

◦ 사업내용 : 남원시 전체 행정구역 대상 물 재이용 관리계획 수립

- 기초조사

- 물 재이용 현황 및 목표설정

- 물 재이용에 따른 하천영향 분석

- 물 재이용 사업계획 수립

- 물 재이용 사업시행 및 재정계획

- 물 재이용 교육 및 홍보, 추진성과 평가

□ 추진실적

◦ 예산편성을 위한 학술용역 심의(가결)	: ‘23. 11.

◦ 2024년 본예산 편성 요구	: ‘23. 12.

□ 금후계획

◦ 물 재이용 관리계획 수립	: ‘23. 12.

◦ 원가심사 의뢰	: ‘23. 1.

◦ 용역 공고 및 사업자 선정	: ‘23. 1. ~ 2.

◦ 물 재이용 관리계획 수립용역 시행	: ‘24. 2. ~ 12.

산내 부운 공공하수처리시설 설치

(신규사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 강영현  전화: 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5개년)

◦ 위    치 : 남원시 산내면 부운리 144번지(달궁ㆍ덕동ㆍ학천 외2)

◦ 총사업비 : 14,486백만원(국비 8,692, 도비 2,897, 시비 2,897)

- ‘24년 사업비 : 800백만원(국비 480 /도비 160/ 시비 160)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=800㎥/일

◦ 추진효과 : 성수기 방문객 폭등으로 인한 방대한 유입하수 처리 용이

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 하수처리장 기술진단	: ‘19. 8. ~ ‘20. 6.

◦ 신규사업 신청	: ‘23. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘23. 10. 20.

□ 금후계획

◦ 사업능력평가 시행	: ‘24. 2. ~ 4.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘24. 4. ~ 12.

◦ 환경부 재원협의	: ‘25. 1. ~ 2.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘25. 2. ~ 3.

◦ 공사 시행	: ‘25. 4. ~ ‘28. 12.

노암 노후 하수관로 정비사업

(신규사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 강영현  전화: 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 2021. 3. ~ 2023. 3. 시행한 노후 하수관로 정밀조사 결과

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2024 ~ 2028년(5개년)

◦ 위    치 : 남원시 노암동 일원

◦ 총사업비 : 15,000백만원 (국비 9,000 /도비 3,000 /시비 3,000)

-‘24년 사업비 : 600백만원 (국비 360 /도비 120 /시비 120)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=9.11㎞, 부분 보수 2,465개소

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 노후 하수관로 정밀조사 용역	: ‘21. 3. ~ ‘23. 3.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘23. 10. 21.

□ 금후계획

◦ 사업능력평가 시행	: ‘24. 2. ~ 4.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘24. 4. ~ 12.

◦ 환경부 재원협의	: ‘25. 1. ~ 2.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘25. 2. ~ 3.	◦ 공사 시행	: ‘25. 4. ~ ‘28. 12.

하수도 세입재원 확충

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 유홍규  담당자: 백서연  전화: 5806

□ 개    요

◦ 하수도 세입재원 부과․징수 현황

2023. 1. 1. ~ 11. 30. 기준 (단위 : 천원)

구 분	부과액	징수액	징수율	체납액	비 고
합 계	5,677,747	4,968,265	87.5%	709,482
상수도분	4,305,460	3,650,635	84.8%	654,825
지하수분	294,674	240,017	81.5%	54,657
원인자부담금	750,219	750,219	100.0%	-
기타수입	327,394	327,394	100.0%	-	이자수입, 불용품 매각 등

□ 추진실적

◦ 하수도 원인자부담금 단가 공고	: ‘23. 1.

◦ 하수도 요금 인상(평균인상률 18.2%)	: ‘23. 1. ~ 3.

◦ 하수도 요금 누락가구 신규 부과․징수(1,397가구)	: ‘23. 2. ~ 9.

- 이백(계산․효촌), 주천(무수), 남원처리구역 일원

◦ 하수도요금 체납자 독촉장 발부 및 압류처분(16건)	: ‘23. 10.

□ 금후계획

◦ 하수도요금 고질체납자 독촉 현장방문 및 유선연락 실시 : ‘23. 12.

◦ 하수관로 정비사업 완공에 따른 수용가 신규부과 추진  : ‘23. 12.

- 사매(손율․수월․덕평․인화), 주천(안곡), 산내면 일원

남원처리구역 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 이영호  전화: 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(5개년)

◦ 위    치 : 남원시 주천면 용담외 15개마을

- 주천(용담ㆍ안곡), 송동(태동), 주생(부동ㆍ중동ㆍ상동ㆍ대지ㆍ소지ㆍ제천ㆍ서만), 대산(서원초), 산동(목동), 신촌동, 왕정동(화정ㆍ한우물), 광치동(광석)

◦ 총사업비 : 27,253백만원(국비 19,079 / 시비 8,174)

- ‘24년 사업비 : 703백만원(국비 492 / 시비 211)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=27.0km, 배수설비 664가구

□ 추진실적

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘20. 6.

◦ 남원시 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고    : ‘22. 1. 25.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 5. ~ 6.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘22. 9. 27.

◦ 공사 시행(1차분)	: ‘23. 3. 6. ~ 12. 10.

- 공정율(13.1%) : 하수관로 L=3.88km

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘25. 8.

- 잔여 공정 : 하수관로 L=23.12km, 배수설비 664가구

아영 인풍지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 이영호  전화: 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 (5개년)

◦ 위    치 : 남원시 아영면, 인월면 일원

- 아영 : 봉대ㆍ외인ㆍ내인ㆍ매산ㆍ서갈ㆍ동갈

- 인월 : 덕실ㆍ연실ㆍ자래ㆍ외건ㆍ내건ㆍ지산ㆍ흥부놀부촌ㆍ흥부골

◦ 총사업비 : 19,556백만원(국비 12,585 / 시비 6,914 / 기금 57)

- ‘24년 사업비 : 1,252백만원(국비 806 / 시비 446)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=18.7km, 배수설비 499가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: ‘20. 6.

◦ 배수구역 및 하수처리구역 변경 공고	: ‘22. 1. 25.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 실시설계 경제성 검토(VE) 용역 시행	: ‘22. 5. ~ 6.

◦ 지방건설기술심의(전라북도)	: ‘22. 9. 27.

◦ 공사 시행(1차분)	: ‘23. 1. 16. ~ 9. 29.

- 공정율(8.39%) : 하수관로 L=3.47km, 배수설비 5가구

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘25. 8.

- 잔여 공정 : 하수관로 L=15.23km, 배수설비 494가구

일반산업단지 주변마을 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 이영호  전화: 5811

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 사매면 일원(손율, 수월, 덕평, 인화)

◦ 총사업비 : 7,735백만원(국비 3,518 / 시비 4,217)

- ‘24년 사업비 : 3,267백만원(국비 355 / 시비 2,912)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=6.3km, 배수설비 99가구

□ 추진실적

◦ 실시설계용역 착수	: ‘20. 6.

◦ 환경부 재원 협의	: ‘22. 3. ~ 4.

◦ 1차분 공사 추진	: ‘22. 5. 9. ~ 12. 26.

◦ 2차분 공사 추진	: ‘23. 3. 9. ~ 6. 27.

- 공정율(70.94%) : 하수관로 L=3.7km, 배수설비 19가구

□ 금후계획

◦ 공사 준공	: ‘24. 6.

- 잔여 공정 : 하수관로 L=2.6km, 배수설비 80가구

운봉지구 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 강영현  전화: 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 일원(엄계, 삼산, 행정, 산덕, 유평, 용은, 가장, 덕산, 공안, 수월)

◦ 총사업비 : 8,700백만원(국비 5,220 / 도비 1,740 / 시비 1,740)

- ‘24년 사업비 : 167백만원(국비 100 / 도비 33.5 / 시비 33.5)

◦ 사업내용 : 하수관로 L=8.2km, 배수설비 200여가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘22. 9. 21.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 착수	: ‘23. 5.

□ 금후계획

◦ 기본 및 실시설계 준공	: ‘24. 3.

◦ 환경부 재원협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘24. 4. ~ 5.

◦ 공사 시행	: ‘24. 6. ~ ‘26. 12.

남원 농어촌마을하수도 하수관로 정비사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 강영현  전화: 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 주천(내기), 보절(진목‧양촌), 산동(부절‧중절), 산내(대정‧백일)

◦ 총사업비 : 6,300백만원(국비 3,780 / 도비 1,260 / 시비 1,260)

- ‘24년 사업비 : 167백만원(국비 100 / 도비 33.5 / 시비 33.5)

◦ 사업내용 : 하수관로 개량 L=4.53km

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 신규사업 신청	: ‘22. 3. 11.

◦ 하수관로 정비사업 가내시 통보	: ‘22. 9. 21.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘23. 5. ~ ‘24. 3.

□ 금후계획

◦ 환경부 재원협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘24. 4. ~ 5.

◦ 공사 시행	: ‘24. 6. ~ ‘26. 12.

사매 대율지구 마을하수도 설치사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 강영현  전화: 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 사매면(대율ㆍ화정) 일원

◦ 총사업비 : 3,000백만원(도비 1,800, 시비 1,200)

- ‘24년 사업비 : 700백만원(도비 350 / 시비 350)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=40㎥/일, 하수관로 L=2,039m, 배수설비 105가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: ‘22. 9. 22.

◦ 계약심의 위원회	: ‘22. 11. 2.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘23. 5. ~ ‘24. 3.

□ 금후계획

◦ 전라북도 재원협의 완료	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘24. 4. ~ 5.

◦ 공사 시행	: ‘24. 6. ~ ‘25. 12.

수지 용강지구 마을하수도 설치사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 김덕곤  담당자: 강영현  전화: 5820

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦ 남원시 하수도정비 기본계획(2017.2.)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)

◦ 위    치 : 남원시 수지면(용강ㆍ남창) 일원

◦ 총사업비 : 2,400백만원(도비 1,440 / 시비 960)

- ‘24년 사업비 : 575백만원(도비 287.5 / 시비 287.5)

◦ 사업내용 : 하수처리시설 Q=40㎥/일, 하수관로 L=1,352m, 배수설비 109가구

□ 추진실적

◦ 하수도정비 기본계획 수립	: ‘17. 2.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 신청	: ‘22. 6. 25.

◦ 지방소멸대응기금 투자사업 선정	: ‘22. 9. 22.

◦ 계약심의 위원회	: ‘22. 11. 2.

◦ 사업능력평가 시행	: ‘23. 2. ~ 5.

◦ 기본 및 실시설계 용역 시행	: ‘23. 5. ~ ‘24. 3.

□ 금후계획

◦ 전라북도 재원협의	: ‘24. 3. ~ 4.

◦ 원가심사(조달청) 및 계약의뢰	: ‘24. 4. ~ 5.

◦ 공사 시행	: ‘24. 6. ~ ‘25. 12.

남원 스마트하수처리장 구축사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 노치호  담당자: 길홍재  전화: 5831

□ 추진근거

◦「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)

◦「하수도분야」보조금편성 및 집행관리실무요령(2021.1, 환경부)

□ 개    요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3개년)

◦ 위    치 : 남원시 주생면 요천로 1036-207(남원하수처리장)

◦ 총사업비 : 4,074백만원(국비 2,037/ 도비 1,018/ 시비 1,019)

◦ 사업내용

- 하수처리공정 지능화 운전, 에너지 관리 소프트웨어 적용

- 실시간 계측장비 구축을 통한 신뢰도 높은 데이터 생산

- 지능형 제어를 위한 처리시설 기능보강

□ 추진실적

◦ 실시설계 용역 시행	: ‘22. 1. ~ 12.

◦ 남원하수처리장 공정별 시설보강 항목조사	: ‘22. 4. ~ 7.

◦ 환경부 재원협의 신청 및 보완	: ‘22. 8. ~ 11.

◦ 원가심사(도) 및 일사감사(시) 완료	: ‘23. 5. ~ 6.

◦ 현장설명회	: ‘23. 9.

◦ 제안요청서 평가	: ‘23. 10. 12.

◦ 계약 체결 및 사업 시행	: ‘23. 10. 23.

□ 금후계획

◦ 시운전 및 준공	: ‘24. 6. ~ 12.

남원 공공하수 및 소규모처리시설 관리대행

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 노치호  담당자: 송준희, 하정민, 길홍재  전화: 5812, 5825, 5831

□ 개    요

구 분	남원하수･분뇨･음식물처리시설	소규모하수처리시설	하수슬러지처리시설
위 탁 비	2,512백만원	1,804백만원	1,816백만원
위 탁 기 간	2023.12.1 ~ 2027년(4년 1개월)	2023년 ~ 2027년(5년)	2020년 ~ 2024년(5년)
위 탁 시 설	하수,분뇨,음식물처리시설	마을하수 64개소, 중계펌프장 75개소	1개소
관리대행사	(유)일토씨엔엠(80%), ㈜테크로스환경서비스(20%)	(유)일토씨엔엠(70%), ㈜에코비트워터(30%)	(유)일토씨엔엠(51%), ㈜에코비트워터(49%)
관 리 인 원	17명	16명	10명

□ 추진실적

[공공하수처리시설]

◦ 관리대행 제안서 평가 및 업체 선정	: ‘23. 11. 15.

◦ 관리대행 시행	: ‘23. 12. 1.

[소규모하수처리시설]

◦ 공공하수도시설 관리대행(운봉, 인월, 소규모, 중계펌프)	: ‘23. 1. ~ 12.

◦ 공공하수도시설 관리대행 성과평가(2022년)	: ‘23. 3.

[하수슬러지처리시설]

◦ 하수슬러지처리시설 관리대행	: ‘23. 1. ~ 12.

□ 쟁점 및 대책

◦ 하수슬러지처리시설(R.T.O.)의 노후화로 인한 효율성 저하, 악취 민원 발생

□ R.T.O 시설 교체를 통한 효율성 증대 및 민원 발생 최소화

□ 금후계획

[공공하수처리시설]

◦ 2024년도분 관리대행 계약 체결	: ‘23. 12.

◦ 관리대행 시행	: ‘24. 1. ~ 12.

[소규모하수처리시설]

◦ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가(2023년)	: ‘24. 3.

[하수슬러지처리시설]

◦ 하수슬러지처리시설 관리대행	: ‘24. 1. ~ 12.

◦ ‘25년 하수슬러지처리시설 관리대행 업체 공고 및 선정	: ‘24. 8. ~ 11.

소규모 마을하수처리시설 개량사업

(계속사업)

작성부서: 환경사업소  부서장: 황도연  팀장: 노치호  담당자: 송준희  전화: 5812

□ 개    요

사업명	사업기간	총사업비	사업내용
보절 양촌 농어촌 마을하수도 개량사업	2023~2025	2,438백만원 (국 729/ 시 1,709)	- 양촌․진목 통합개량 Q=50㎥/일 하수관로 신설 L=1.98㎞
주천 내기 농어촌 마을하수도 개량사업	2023~2024	1,082백만원 (국 325/ 시 757)	전면개량 Q=30㎥/일
산내 대정 농어촌 마을하수도 개량사업	2023~2024	917백만원 (시 917)	공법변경 Q=130㎥/일
수지 호곡 마을하수처리시설 방류관로 사업	2023~2025	1,500백만원 (도 800/ 시 700)	방류관로 신설(L=1.7㎞) 중계펌프장 설치(2개소)

□ 추진실적

◦ 주천 내기 개량사업 공사 착공	: ‘23. 6.

◦ 보절 양촌 개량사업 기본 및 실시설계용역	: ‘23. 9.

◦ 산내 대정 개량사업 설치 인가	: ‘23. 9.

□ 쟁점 및 대책

◦ 보절 양촌마을 주민 민원으로 처리장 위치 변경하여 실시설계용역 재착수

- 설계 완료 후 조속히 행정절차 이행하여 공사 발주 예정

□ 금후계획

◦ 주천 내기 개량사업 공법자재 발주	: ‘24. 1.

◦ 수지 호곡 관로사업 기본 및 실시설계용역	: ‘24. 1.

◦ 보절 양촌 개량사업 재원협의 및 설치인가	: ‘24. 1. ~ 2.

◦ 보절 양촌 개량사업 공사 발주 및 착공	: ‘24. 3.

◦ 주천 내기 개량사업 준공	: ‘24. 4.

◦ 수지 호곡 관로사업 공사 착공	: ‘24. 6.