2010. 1

주 요 업 무 보 고

투 자 유 치 과

목        차

□ 일 반 현 황
□ 2009 주요업무 결산
□ 2010 중점 추진방향
□ 2010 주요업무 계획
◦ 인월 제2농공단지 조성사업
◦ 남원시 투자환경 설명회 개최
◦ 유망기업의 적극적인 유치활동 전개
◦ 노암 제3농공단지 조성사업
◦ 농공단지 유지관리사업
◦ 중소기업 육성지원 사업
◦ 친환경 골프장 조성사업

일  반  현  황

□ 기    구

											투자유치과장
											이 남 준
기업유치담당					기업지원담당							투자유치담당							입지개발담당						골프장조성담당
장 주 호					임 부 택							이 선 재							김 오 진						김 이 수
기 업 유 치 첨단산업유치 유치기업지원					중소기업창업 중소기업지원 공장설립등록							민 자 유 치 SOC민간투자 투 자 상 담 투자유치홍보							투자촉진지구 농공단지조성 투 자 유 치 D/B구축						부지매입지원 보 상 업 무 행정절차지원

□ 인   력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기 능	비 고
정 원	18	1	5	6	4	1	1
현 원	15	1	5	3	3	1	2
증 감	△3			△3	△1		1

□ 제조업체 현황

(‘10. 1. 1현재)

구 분	계	식품 음료	섬유류 의류	공예 분야	종이 인쇄류	화학 고무등	비금속광 물	조립 금속 통신	자동차부품등	가구등기 타
업체수 (개소)	191	52	2	31	13	15	36	33	5	4
종업원 (명)	2,660	964	250	200	153	148	407	294	167	77

□ 농공단지 현황

(‘10. 1. 1현재)

단지명	소재지	조성년도	면적 (㎡)	사업비 (백만원)	업체수 (개소)	종업원수 (명)	주 생산품
계	5개단지		567,081	23,927	58	1,141
인 월	인월면	‘85～’86	50,866	667	3	277	식품,목기
어 현	어현동	‘91～’92	116,874	3,540	1	220	면사
광치Ⅰ	광치동	‘91～’92	139,663	5,340	14	285	자동차부품,화학, 기계,식품
광치Ⅱ	용정동	‘94～’95	112,535	4,770	22	172	기계,한지,생약,금속
노암Ⅰ	노암동	‘01～’05	147,143	9,610	17	175	기계,전자,식품
노암Ⅱ	노암동	‘07～’09	167,102	12,300	1	12	식료품, 금속가공

2009년 주요업무 결산

	투자유치 환경 선진화
◦ 산업용지 확대 등 산업인프라 확충으로 기업도시로써의 기능강화 ◦ 다양한 기업유치 활동과 기업지원으로 친기업 시정구현

□ 기업유치를 위한 산업용지 개발 추진

◦ 노암 제2농공단지 준공(167,102㎡) - ‘09. 12월

◦ 노암 제3농공단지 용역설계 및 지장물 보상 추진/325,000㎡

□ 일자리 창출을 위한 중견기업유치활동 전개

◦ 투자유치 자문단 운영 및 투자환경 설명회 등 차별화된 기업유치활동

- KID 최고경영자 포럼 투자환경 설명 1회

- 한국중견기업연합회 조찬포럼 투자환경 설명 1회

- 한국중견기업연합회 CEO 및 임원 초청 투자환경 설명회 1회

- 투자유치 자문회의 2회, 투자환경 설명회 2회

◦ (주)엠피온스 투자유치 촉진지구 지원 추진

- 도시관리계획(산업형지구단위계획) 용역비 및 절차 지원

- 투자유치 촉진지구 부지 및 지장물 보상 추진

- (주)엠피온스 남원공장 기공식(‘09. 11월)/2010년 하반기 1차 공장가동 예정

◦ 기업 및 투자유치 촉진조례 및 시행규칙 전부개정 추진

- 수도권 이전기업 지원 차별화 및 불합리한 지원 사후관리 규정 개선

□ 친환경 골프장 조성 추진

◦ 원활한 골프장 조성을 위한 부지매입 전담팀 운영 등 지원활동 전개

- 드라곤 레이크CC 및 상록CC 2개소 착공

	주 요 성 과
◦ 노암 제2농공단지 조성완료 및 노암 제3농공단지 조성추진 ◦ 43억원의 중소기업 육성자금 지원을 통한 중소기업 경영안정 ◦ 설명회 및 투자유치 자문단 운영으로 차별화된 기업정책 추진

2010 중점 추진 방향

기업 친화적 행정시스템과 산업인프라 구축

	중 점 과 제
￭ 고부가가치 유망 중소기업 유치 ․기업인 인적네트워크 정보 활용 ․유치기업의 사전검증 및 대면 홍보활동 전개 ￭ 산업용지 공급 확대 ․신규 농공단지 추가 조성 추진 ․투자유치 대상지 물색 및 DB화 ￭ 중소기업 지원 강화 ․관내 기업체 애로사항 해소 ․중소기업 육성자금 확대 지원

친 기업도시 시정구현 및 투자유치 증대 효과

2010 주요업무 계획

인월 제2농공단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 인월면 상우리 304-4번지 일원(인월농공단지인근)

◦ 사업규모 : 조성면적 31,000㎡, 입주규모 2～3개업체정도

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2011 (2년간)

◦ 총사업비 : 20억원(국비 4.7 도비 0.5 시비 14.8)

(단위 : 억원)

구 분	계	2010년 까지	2011년	2012년	비 고
계	20.0	2.0	18.0	-
국 비	4.7	-	4.7	-
도 비	0.5	-	0.5	-
시 비	14.8	2.0	12.8	-

□ 추진실적

◦ 타당성 조사 (농촌공사)                        : 2009. 8. 3 ～ 8. 21

◦ 사업계획 주민(대표) 설명회 개최               : 2009. 9. 1

◦ 지방재정투ㆍ융자 심사(남원시 적정)                : 2009. 9. 16

◦ 주민설명회 개최(2회 면사무소, 하우마을)           : 2009. 9. 1,   9. 21

□ 추진계획

◦ 용역사업 추진(도시관리계획 외 2건)           : 2010. 1 ～ 10

◦ 편입토지 보상 추진                           : 2010. 1  ～

◦ 신규 농공단지 선정(농수산식품부)             : 2010. 3

◦ 행정절차 이행(지정승인,관계기관 협의)         : 2010. 4 ～ 10

◦ 실시계획 승인 고시 및 공사 착공(토목외3건)   : 2010. 11

□ 기대효과

◦ 동부권 신규 단지조성으로 고용기회 창출 및 주민 농외소득 증대

◦ 인월농공단지와 연계한 농산품 가공공장 유치로 지역 농산품 애용

남원시 투자환경 설명회 개최

□ 개    요

◦ 개최시기 : 2010. 10월(단독 개최 1회)

◦ 소요예산 : 75,000천원(홍보물 40,000천원, 설명회 35,000천원)

◦ 개최권역 : 수도권 또는 영남권

◦ 기본방향 : 우리시 투자환경 홍보 및 산업입지 개발 소개 등

□ 추진실적

◦ 투자환경 동영상 수정 보완 및 영문판 제작 : ‘09. 1월 ~ 4월

◦ 투자환경 홍보 브로슈어 제작 : ‘09. 4.

◦ 2009 상반기(인천) 투자환경 설명회 개최 : ‘09. 6. 3.

◦ 2009 하반기(창원) 투자환경 설명회 개최 : ‘09. 10. 28.

□ 추진계획

◦ 투자환경 동영상 및 홍보물 제작 추진 : 2010. 1. ~ 6.

◦ 2010 투자환경 설명회 기본방향 수립 : 2010. 7. ~ 8.

- 개최지역 및 초청자 선정, 행사진행방법 수립 등

◦ 2010 하반기 설명회 사전준비활동 및 개최추진 : 2010. 9. ~ 10.

※2010 상반기 지방선거일정으로 추진곤란

유망기업의 적극적인 유치활동 전개

□ 개    요

◦ SOC 확충 등 산업인프라 개선에 따른 대기업 및 중견기업 유치

◦ 노암 제2․3, 인월 제2농공단지 및 산업단지 조성에 따른 맞춤형 기업 유치

□ 추진실적

◦ KID 최고 경영자 포럼 참석 투자환경 소개 및 설명 : 2009. 2. 3.

◦ 한국중견기업연합회 조찬강연 투자환경 설명 : 2009. 6. 23.

◦ 기업 및 투자유치 촉진조례 전부개정 추진 : 2009. 7. 2.

- 수도권 이전기업 지원기준 상향 및 불합리한 지원 사후관리 개선

◦ 한국중견기업연합회원 초청 투자환경 설명회 : 2009. 11. 6.~7.

□ 추진계획

◦ 기업인 단체 및 모임 투자환경 설명활동 전개

- 기업인 및 관계자 인적네트워킹 활용

◦ 투자의향 있는 교류기업체의 지속적인 접촉을 통한 투자유도

◦ 개발용지가 부족한 인근 대도시 기업체 개별홍보 활동

노암 제3농공단지 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 노암동 산37번지 일원(노암 제1농공단지 주변)

◦ 사업규모 : 조성면적 325,000㎡, 입주규모 20개 업체정도

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2012 (4년간)

◦ 총사업비 : 220억원(국비 50, 도비 5, 시비 165)

(단위 : 억원)

구 분	계	2009년 까지	2010년	2011년	2012년	비 고
계	220	13	10	100	97
국 비	50	-	-	20	30
도 비	5	-	-	-	5
시 비	165	13	10	80	62

□ 추진실적

◦ 타당성 조사 및 지방재정 투‧융자 심사         : 2008.  7. 2 ～ 10. 28

◦ 기본부문, 환경평가부문 용역 착공                 : 2008. 12. 30

◦ 토지 및 지장물 조사(토지 112필지 303,646㎡)             : 2009.  3. 2 ～ 4. 30

- 보상완료 : 토지 15필지 13,637㎡,  분묘이장 12기

□ 추진계획

◦ 용역사업 추진(도시계획 외 6건)               : 2008. 12 ～ 2010. 10

◦ 편입토지 보상 추진(예산범위내)                : 2010. 1  ～

◦ 신규 농공단지 선정(농수산식품부)             : 2010. 3

◦ 행정절차 이행(지정승인,관계기관 협의)         : 2010. 4 ～ 2010. 10

◦ 실시계획 승인 고시 및 공사 착공(토목외3건)   : 2010. 11

농공단지 유지관리사업

□ 개    요

◦ 단 지 명 : 4개단지(인월, 광치1, 광치2, 어현)

◦ 사업내용 : 유지보수사업 4건,  공업용수개발이용시설(590톤/일) 3공

◦ 사업기간 : 2010. 1 ～ 2010. 7

◦ 사 업 비 : 495백만원(도비 345,  시비 150)

◦ 연도별 투자내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	2007년	2008년	2009년	2010년	비 고
계	1,540	469	135	441	495
국 비	-	-	-	-	-
도 비	500	-	-	155	345(명시)
시 비	1,040	469	135	286	150

□ 추진실적

◦ 유지관리사업 용역설계 발주                  : 2009.  2

◦ 유지관리사업 추진(완공7건)                   : 2009.  3 ～ 9

- 인월(도로1, 사면1), 광치1(관리사1), 광치2(관리사1), 어현(안전시설1)

노암(배수지계측제어1, 관리사방수1)

◦ 공업용수 개발사업 추진(도비확보, 계약등)      : 2009.  6 ～ 10

- 광치 제2농공단지 공업용수 4공 개발

□ 추진계획

◦ 용역설계 추진(공업용수이용시설, 유지관리사업)       : 2010.  1 ～ 2

◦ 공업용수 및 유지관리사업 추진                     : 2010.  3 ～ 6

- 공업용수 이용시설(전기, 기계, 장옥등) 3공

- 유지관리사업(관리사무소 1, 교량신축이음 1, 옹벽보수 2, )

중소기업 육성지원 사업

□ 개    요

◦ 대    상 : 관내 중소기업

◦ 사 업 비 : 3,629백만원(기금 3,626백만원 + 일반예산 3백만원)

◦ 사업내용 : 중소기업 육성자금 지원, 애향장려금 지원

중소기업기술경영 컨설팅 사업, 산학연 기술공동개발사업

□ 추진실적

◦ 남원시 중소기업육성자금 지원(대출금리 4% 이차보전)

- 2009년 지원실적 : 16개 업체/4,280백만원(기금조성액 3,426백만원)

◦ 애향장려금 지원(관내 중소업체 6개월 이상 기능직 종사자)

- 2009년 지원실적 : 8명/2,400천원

◦ 중소기업기술경영 컨설팅 사업 및 산학연 기술공동개발사업

- 2009년 지원실적 : 신청업체 없음

□ 추진계획

◦ 남원시 중소기업육성자금 지원

- 지원범위확대 : 사업자등록 후 소기업으로 운영하고 있는 제조업체

(현재 공장 등록 후 1년 이상 경과된 제조업체 지원)

- 지원예상액 : 4,000백만원(1개업체당 3억원 이내/15개업체 지원예상)

◦ 애향장려금 지원

- 사 업 비 : 3백만원(1인당 300천원 1회 지급)

- 지원인원 : 10명(관내출신 및 거주자, 관내 중․고등학교 졸업자)

◦ 중소기업기술경영 컨설팅 사업 및 산학연 기술공동개발사업

- 사업추진방식 : 중소기업진흥공단 + 시 + 기업체(기업체 신청)

- 중소기업진흥공단 사업신청 상황에 따라 추경예산편성 추진

◦ 중소기업 지원시책 합동설명회 추진(중소기업청 + 시) : 2010. 3월중

친환경 골프장 조성사업

□ 개    요

골프장명	위 치	규 모 (홀)	조성면적 (㎡)	투자규모 (억원)	사업기간	투자사
드라곤레이크CC	대산 옥율	18	948,197	650	2007～2011	대산농원(주)
상 록CC	대산 신계	18	1,185,890	669	2007～2012	공무원연금공단
비 전CC	운봉 덕산	18	817,185	697	2007～2011	H․H관광개발(주)
남 원CC	덕과 고정	18	944,417	669	2007～2012	(주)롯데햄

□ 추진상황

【공사중 / 2개소】

◦ 드라곤레이크 CC (공정율 15 %)

- 골프장 기공식 : ‘09. 4. 15. / 공사 착공계획서 제출 : ‘09. 5. 15.

- 현재 토목공사중 / 2011년 하반기 준공예정

◦ 상록 CC (공정율 5 %)

- 골프장 기공식 : ‘09. 10. 27. / 공사 착공계획서 제출 : ‘09. 11. 19.

- 현재 토목공사중 / 2012년 상반기 준공예정

【행정절차 진행중 / 2개소 】

◦ 비  전 CC

- 도시관리계획 승인신청 : ‘09. 5. 27.

- 도시관리계획(체육시설)결정고시 및 지형도면고시 : ‘09. 7. 17.

- 환경영향평가 및 실시계획인가 준비중

- 2010년 인허가 완료 후 착공예정

◦ 남  원 CC

- 도시관리계획승인신청 : ‘09. 3. 27.

- 전라북도도시계획위원회 심의중

- 2010년 인허가 완료 후 착공예정