2010. 1

주 요 업 무 보 고

도   시   과

목       차

□ 일 반 현 황
□ 2009 주요업무 결산
□ 2010 중점 추진 방향
□ 2010 주요업무 계획
	- 남원 일반산업단지조성 사업
	- 구 남원역 부지개발
	- 개발촉진지구 기반시설(도로) 사업
	- 네트워크형 광역자전거 전용도로개설
	- 남원 도시계획수립 및 관리
	- 도시관리계획 지형도면 고시
	- 도통1․2택지개발지구 지구단위계획수립
	- 도시 가로망 확충사업
	- 금동 ․ 서문, 교육원 진입대로 개설사업
	- 남원여고 앞, 조산중로 개설공사
	- 지리산 선수촌 조성사업
	- 도로명 및 건물번호 부여사업
	- 공간정보 고도화를 위한 GIS 운영

일 반 현 황

□ 기  구

						도시과장
						박 종 주
도 시 계 획						도 시 정 비							시 설 개 발								지 리 정 보
성 길 경						조 남 도							김 종 학								심 재 현
◦도시기본계획수립 ◦도시관리계획수립 ◦도시계획시설 결 정 및 인가 ◦지구단위계획수립 ◦개발행위 허가 ◦기반시설부담금 ◦공원점사용 허가 ◦충무계획 수립						◦도시가로망사업 시행 및 정비 ◦자전거 이용도로개설 및 정비 ◦시의 국도정비 ◦시의 시도정비 ◦전선지중화사업 ◦안전한보행환경 조성사업							◦택지개발 사업 ◦온천개발업무 ◦일반산업단지 조성 ◦지리산 선수촌 조성 ◦개발촉진지구개발사업추진								◦새주소 사업 ◦도로명종합계획 수립 ◦도로와 지하시설물(GIS)전산화 ◦도시기준점관리 ◦수치지형도제작 및 관리 ◦전문건설업관리

□ 인  력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능	비고
정 원	20	1	5	8	6	0	0
현 원	16	1	4	8	2	0	1	청경: 1 별 도
증 감	△4	0	△1	0	△4	0	1

□ 도시관리계획

(단위 : ㎢)

총 면 적	도시지역	관리지역	농림지역	자연환경보전
752.81 (100%)	29.87 (4.0)	266.58 (35.4)	348.06 (46.2)	108.30 (14.4)

□ 도시지역 (용도지역별)

(단위 : ㎢)

도시별	계	제1종 일 반	제2종 일반	준주거	일 반 상 업	일 반 공 업	자 연 녹 지	생 산 녹 지
계	29.871 (100%)	0.062 (0.2)	6.329 (21.2)	0.021 (0.1)	0.987 (3.3)	0.731 (2.4)	20.757 (69.5)	0.984 (3.3)
남 원	25.871 (100%)	0.062 (0.2)	5.335 (20.6)	0.016 (0.1)	0.809 (3.1)	0.731 (2.8)	18.918 (73.1)	- (0)
운 봉	1.66 (100%)	-	0.508 (30.6)	-	0.095 (5.7)	-	0.695 (41.9)	0.362 (21.8)
인 월	2.34 (100%)	-	0.486 (20.8)	0.005 (0.2)	0.083 (3.5)	-	1.144 (48.9)	0.622 (26.6)

□ 도로현황 (도시계획시설)

(단위 : ㎞)

구 분	전체계획		개 설		미 개 설		개설율 (%)
	노선수	연장	노선수	연장	노선수	연장
계	569	184.1	260	109.4	309	74.7	59.4
대 로	29	54.2	10	41.5	19	12.7	76.6
중 로	87	52.3	40	29.6	47	22.7	56.6
소 로	453	77.6	210	38.3	243	39.3	49.4

※ 개설율 - 전북도  6시 평균 : 73.7% (정읍 51%, 김제56.9%)

□건설업체현황

총 계		남원시관리						전북도관리
		소 계		전문건설업		가스․난방업		일반건설업
업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수	업체수	면허수
296	458	265	424	218	356	47	68	31	34

2009년 주요업무 결산

	일류명품도시건설
◦ 개발촉진지구지정 및 개발계획수립 ◦ 지역 발전사업 추진기틀 마련 ◦ 도시기반시설 확충 및 정비 ◦ 관광인프라 사업 마무리

□ 지역발전 촉진을 위한 민자사업 추진 기틀 마련

◦ 개발촉진지구 지정 : 국토해양부/66.64㎢, 13개사업 (2009～2018)

◦ 골프장조성 추진 : 3개 지구 (사업인가 2개, 시설결정 1개)

◦ 개별공장 입지결정(제2종지구단위계획) : 엠피온스/107,285㎡(8월착공)

□ 도시기반시설 확충으로 시민생활 편의도모

◦ 대  로 :  4개노선,  2,847m      ◦ 중  로 :  5개노선,  2,860m

◦ 소  로 :  7개노선,  1,080m      ◦ 기  타 :  19노선,   4,190m

□ 관광인프라 구축으로 지역 소득증대에 기여

◦ 지리산허브밸리지구내 주차장 추가 조성 완료(대형121대)

◦ 구 운천초교 고원선수촌 조성 : 건물철거 완료 및 도시계획시설 결정 용역 중

□ 친절하고 신속한 민원처리로 행정신뢰도 제고

◦ 개발행위 허가 : 270건 (평균 5일 단축처리)

◦ 전문건설업 등록․신고 : 238건 (평균 10일 단축처리)

	주요성과
◦ 광역 네트워크 자전거도로 개설 사업비(분권교부세) 10억 확보 ◦ 개발촉진지구 기반시설사업, 국비 421억원 확보 ◦ 소로개설사업 8건 완공(조산8통, 인월, 경찰서뒤 등)

2010 중점 추진 방향

시민이 살기 좋은 도시공간 조성

	중 점 과 제
◦체계적인 국토이용계획 수립 추진 - 도시관리계획 재정비 지적승인 고시 - 도통 1, 2택지개발지구 제1종지구단위계획 수립 ◦시민이 편안한 도시기반시설의 확충 및 정비 지속 추진 - 금동간선, 서문～신정간, 공무원교육원 진입도로 정비 등 - 광역네트워크 자전거도로 정비 등 ◦지역발전을 위한 산업인프라 구축 - 남원지방산업단지 조성 추진, 개발촉진지구 개발사업 등

2010 주요업무 계획

남원 일반산업 단지조성 사업

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 주생면 (지당, 정송, 영천) 일원

◦ 면    적 : 992천㎡ (300천평) / 사업기간 : 2007 ~ 2013

◦ 사 업 비 : 527억원(시비 17, 민자 510)

◦ 사업시행자 : 한국토지주택공사

◦ 유치업종 :  자동차 부품산업, 첨단산업(전자․IT), 기계, 문화관광산업

□ 추진실적

◦ 타당성 조사 완료                            : 2007. 11. 20

◦ 산업단지개발 기본 협약(남원시↔한국토지공사) : 2008.  7. 18

◦ 토지거래허가구역 지정(1,508천㎡)              : 2008.  8. 18

◦ 기초조사 및 항공측량 완료(한국토지공사)      : 2008.  8 ~ 11

◦ 토지이용계획(지구계) 확정                    : 2009.  4

	＜민선4기 주요성과＞
◦ 토지거래 허가구역 및 개발행위 제한구역 지정 ◦ 산업단지 개발 기본협약 MOU 체결(한국토지공사)

□ 2010년 추진계획

◦ 투자심의(한국토지주택공사)           : 2010. 1 ~

□ 문제점 및 대책

◦ 산업단지 탄력적 추진을 위해 조성규모 조정(면적992천㎡→650천㎡)

◦ 산업단지 조성 후 입주업체 추가수요 발생시 단계적 지구 확대조성

구 남원역 부지 개발

□ 사업개요

◦ 위    치 : 남원시 동충동 197-1 일원(서문건널목～향교건널목)

◦ 사업규모 : 132,697㎡(철도공사 87.6%, 남원시 11.8%, 기타 0.6%)

◦ 사업내용 : 역사문화관광테마파크 개발계획(철도공사 계획)

□ 추진실적

◦ 구 남원역주변 개발방안 협의 및 건의    : 2006. 10. 9

◦ 철도공사 자체 개발계획 검토            : 2008. 1 ～ 5

◦ 철도공사의 기업대상 개발참여의향조사(참여기업 없음) : 2008. 6

◦ 개발촉구 및 폐선부지 장기분할매각 지속건의 : 2006. 10 ～ 2009. 7

◦ “향기원” 조성 및 꽃단지 관리 운영 중   : 2007. 1 ～ 현재

◦ 구 역사 본관 건물 임대협의 추진        : 2009. 9 ～ 현재

	＜민선4기 주요성과＞
◦ 철도공사와 공동협력개발추진 협의(공공성+수익성) ◦ “향기원” 조성으로 도시미관 향상과 시민휴식공간 제공

□ 2010년 추진계획

◦ 구 역사 본관 건물 임대 추진

- 리모델링 후 미술관 등 기획전시 공간 활용에 기여

□ 문제점 및 대책

◦ 철도공사에서 경제상황 등 제반여건으로 2015년 이후 개발계획 검토

☞ 지속적인 개발촉구와 개발 전까지 부지 및 본관 건물을 시민휴식,        전시공간으로 활용

개발촉진지구 기반시설(도로)사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 일원(사매, 운봉, 주생) 개발촉진지구 내

◦ 사업규모 : 도로 4개노선 L=14.9km, B=8~20m

◦ 총사업비 : 421억원(국비 100%) / ※ 2010년 : 924백만원(용역비)

◦ 사업기간 : 2010 ～ 2014년(5년)

◦ 지구별 내역

사 업 명	위 치	사업규모	사업비(억원)	비 고
계	4개소	L=14.9km	421
혼불배경지연결도로	사매면 서도리	L=3.5km B=10～12m	67
국악의성지연결도로	운봉읍 가산리	L=4.6km B=10m	75
허브벨리주변관광순환도로	운봉읍 용산리	L=4.0km B=8～15m	115
주생산업단지연결도로	주생면 지당리	L=2.8km B=20m	164

□ 추진계획

◦ 실시설계 용역 발주   : 2010. 1 ～ 2월

◦ 실시설계 용역 시행   : 2010. 3 ～ 7월

◦ 관계기관협의 및 실시계획승인(국토해양부) : 2010. 7 ～ 10월

◦ 사업시행             : 2011 ~

□ 기대효과

◦ 주민생활환경개선 및 지역경제 활성화 도모

◦ 낙후지역 개발촉진으로 지역균형발전 도모

네트워크형 광역자전거 전용도로개설

□ 사업개요

◦ 위  치 : 섬진강(요천)제방도로 (장수 ⇔ 남원 ⇔ 곡성)

◦ 사업량 : 19.1km(총33.7km, 기시행 14.6km)  B = 3 ～ 4m

◦ 사업비 : 6,000백만원(2010년 10억)

◦ 사업기간 : 2008 ～ 2013(6년)

□ 추진실적

◦ 기 시행 : 14.6km

◦ 2010년도 지방이양사업 분권교부세 10억원 확보

□ 추진계획

◦ 1구간 : 88고속도로(요천횡단교량) ～ 요천검문소  L = 2.4km

◦ 2구간 : 환경사업소 ～ 지당제 L = 1.5km

◦ 옥율천 자전거용 강교 1개소 70m

남원 도시계획수립 및 관리

□ 개    요

◦ 대상지역 : 752.81㎢ (도시4.0%, 관리35.4%, 농림46.2%, 자연환경14.4%)

◦ 수립내용 : 도시관리계획 재정비 (5년 단위 정비, 2015년 목표)

･ 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획

･ 기반시설의 설치･정비 또는 개량에 관한 계획 등

◦ 총용역비 : 1,135백만원 (‘10 : 40백만원 - 관리지역 추가세분)

◦ 사업기간 : 2007. 1 ～ 2010. 7.

□ 추진실적

◦ 관리지역 254.57㎢ 세분 완료            : 2008. 12. 26(전라북도 고시)

(계획관리 47.6%, 생산관리 24.1%, 보전관리 23.6%, 미세분 4.7%)

◦ 도시관리계획 재정비 추진

- 주민설명회 및 주민의견 공람 (일간지2, 홈페이지 등) : 2009. 7. 9 ～ 7. 22(14일간)

- 시 의회 의견청취                      : 2009. 11. 5

- 시 도시계획위원회 자문 및 심의        : 2009. 11. 23

- 관계기관·부서 협의 중(전북도, 환경청, 산림청 등) : 2009. 12 ～

□ 금후계획

◦ 관계기관·부서 협의                             : 2010. 1

◦ 도 도시계획위원회 심의                         : 2010. 2

◦ 도시관리계획(재정비)변경결정 및 지형도면 고시   : 2010. 3

◦ 관리지역 추가세분(23.04 ㎢) 고시                : 2010. 1 ~ 7

도시관리계획 지형도면 고시

□ 사업개요

◦ 대상지역 : 752.81㎢(남원시 행정구역 전체)

◦ 사업내용

- 도시관리계획(5년마다 재정비) 결정사항 지형도면조서 및 도면작성

┌ 도시지역 : 지적이 표시된 1/1,200 지형도

└ 비도시지역 : 1/5,000 지형도 작성

- 최초 도시계획결정고시부터 현재까지 도시계획관리 이력정보 구축

◦ 용 역 비 : 1,043백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2008까지	2009년	2010년	비 고
사 업 비	1,043	719	324	-

◦ 용역기간 : 2007. 4. 27 ～ 2010. 3

□ 추진실적

◦ 관리지역 세분 결정 지형도면 고시(266.55㎢) : 2008. 12. 26

◦ 도시관리계획 재정비(안) 지형도면 고시도 작성 중

◦ 기 결정된 도시계획 이력 전산화 구축완료

□ 추진계획

◦ 2010. 3월 완료예정인 도시관리계획 재정비와 병행 고시 될 수 있도록 변경자료 지속정비

도통1․2택지개발지구 지구단위계획수립

□ 사업개요

◦ 용 역 명 : 도통1·2택지개발지구 제1종지구단위계획 수립 용역

◦ 대상지역 : 167,219㎡

- 1지구 99,813㎡(시청 일원),  2지구 67,406㎡(고속터미널 일원)

◦ 사업내용 : 기반시설계획, 토지이용계획, 건축계획 정비 등

◦ 용 역 비 : 377백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2009년	2010년	2011년	비 고
사 업 비	377	100	100	177	-

□ 추진실적

◦ 용역설계 및 발주(사업수행능력평가)           :  2009. 1 ～ 4

◦ 1차분 용역 착수(도급업체 : 주식회사 삼안)     :  2009. 4. 29

- 현황조사 및 사전환경성, 교통성검토서 작성 중

□ 추진계획

◦ 주민의견청취 및 관계기관·부서협의           : 2010. 4 ~ 5

◦ 시 도시계획위원회 자문 및 도 도시·건축공동위원회 심의 : 2010. 6

◦ 도시관리계획(변경)결정 및 지형도면승인 고시 : 2010. 8

□ 문제점 및 대책

◦ 2010. 8월 완료 목표로 용역 추진 중이나 2010년 예산 부족

☞ 2010년 추경예산 177백만원 확보 건의

도시가로망 확충 사업

□ 사업개요

◦ 사업대상 : 도시계획으로 결정된 도로 개설

◦ 사 업 량 : 12지구 ( L = 6,563m  B = 6 ～ 35m )

◦ 사업기간 : 2004 ～ 2014 (10개년)

◦ 사업계획                                              (단위 : 백만원)

구 분	사업량	총 사업비	2009년 까지 투자	2010추진	2010이후
계	12개 지구 L = 6,563m	41,100	24,019	4,450	12,631
대 로	4개 지구 L = 3,710m	28,000	18,784	2,750	6,466
중 로	3개 지구 L = 2,030m	9,200	4,235	800	4,165
소 로	5개 지구 L = 823m	3,900	1,000	900	2,000

□ 추진실적

◦ 지하구조물 설치 및 기층포장 완료

- 금동간선 개설 : 72%      - 공무원교육원진입로 개설 : 70%

◦ 서문~신정(교육청)간 대로 개설공사 : 보상완료 85%, ※ ‘09. 12월 착공

◦ 중․소로 : 중로1, 소로 7지구 완공

□ 추진계획

◦ 금동간선, 공무원교육원진입로 완공 : 2010. 6

◦ 한빛나들목 개설 : 토지보상 완료 및 실시설계 완료

≪2010년도 도시가로망 지구별 사업계획≫

□ 도시가로망 개설사업(도시계획시설사업)                    (단위 : 백만원)

구분	지 구 명	위치	사업량	총 사업비	2008 까지	2009 년도	2010 계획	2011 이후	비고 (추진계획)
계			12지구	41,100	15,049	8,970	4,450	12,631
대로	소 계		4지구	28,000	11,664	7,120	2,750	6,466
	금동간선	금동,조산	L=770m,B=35m	6,500	4,000	1,790	710	0	·공사추진(72%)
	서문～신정	금동,왕정	L=670m,B=35m	8,000	2,000	2,330	700	2,970	·보상추진(82%) ·공사추진(10%)
	공무원교육원 진 입 도 로	향교동	L=1,370m, B=15～25m	6,500	2,160	3,000	1,240	100	·공사추진(70%)
	한빛나들목개설	도통동	L=900m,B=35m	7,000	3,504	0	100	3,396	·실시설계.보상
중로	소 계		3지구	9,200	3,285	950	800	4,165
	남원여고앞중로	왕정동	L=990m,B=20m	4,800	2,085	500	450	1,765	·공사추진(52%)
	조산동중로	조산동	L=440m,B=15m	2,100	800	300	200	800	·공사추진(10%)
	새터중로개설	신정동	L=600m,B=20m	2,300	400	150	150	1,600	·보상추진(90%)
소로	소 계		5지구	3,900	100	900	900	2,000
	죽항리버사이드	죽항동	L=190m,B=8m	1,100	100	400	200	400	·보상추진(78%)
	공설시장소로	금동	L=150m,B=6m	900	0	200	200	500	·보상추진(42%)
	새집앞소로	금동	L=60m,B=6m	600	0	300	300	0	·보상추진(75%)
	조산10통소로개설	조산동	L=300m,B=8m	700	0	0	100	600	·보상추진(신규)
	서문주차장~공설시장간소로	금동	L=123m,B=6m	600	0	0	100	500	·보상추진(신규)

□ 도시가로망 (비 도시계획시설사업 및 유지관리사업)

구분	지 구 명	위치	사업량	총 사업비	2008 까지	2009 년도	2010 계획	2011 이후	비고 (추진계획)
시설정비	소 계		8지구	9,374	585	518	2,441	5,830
	네트워크형자전거도로	곡성 ~ 장수	L=19,100m	6,000	200	0	1,000	4,800
	도시미관정비사업	남원시일원	30개소	600	0	0	270	330
	도로구조정비	남원시일원	10개소	1,188	385	518	285	0
	법원앞도로구조개선	동충동	L=40m a=215㎡	800	0	0	400	400
	식정우회도로실시설계	도통동	L=1,240m B=10m	50	0	0	50	0
	시가지인도정비	남원시일원	15개소	600	0	0	300	300
	시도27호선재포장	광석-호치	L=1,240m B=10m	100	0	0	100	0
	자전거거치대설치	시내권		36	0	0	36	0
			3개소

금동 ․ 서문, 교육원 진입대로 개설사업

□ 사업개요

◦ 위  치 : 한일주유소 ～ 남원교육청 ～ 서문로터리, 공무원교육원 진입로

◦ 사업비 : 21,000백만원

◦ 지구별 사업조서                                       (단위 : 백만원)

사업명	구 간	사업량	총 사 업 비			투자 실적 및 계획				비 고
			총 계	공사비	보상비	2008 까지	2009	2010 계획	2011
총 계	3개소	L=2,808m	21,000	12,300	8,700	8,160	7,120	2,650	3,070
금동간선 대로개설	한일주유소 ～남원교육청	L=770m B=35m	6,500	3,200	3,300	4,000	1,790	710	-	2005～ 2010
서문간선 대로개설	남원교육청 ～서문로터리	L=670m B=35m	8,000	3,800	4,200	2,000	2,330	700	2,970	2008～ 2011
공무원교육원 진입도로	의총교 ～산곡동	L=1,368m B=15～25m	6,500	5,300	1,200	2,160	3,000	1,240	100

□ 추진실적

◦ 금동 간선대로 (72%) - 미 협의 토지 8필지(6인) 토지수용 완료

- 토공 및 구조물 시공 중

◦ 서문~신정(교육청)간 대로(10%)  - 토지 41필지 중 35필지 보상완료

- 공사착공 : 2009. 12.

◦ 공무원교육원 진입로(70%) - 토지보상 협의 64필지 완료

- 지하구조물 및 기층포장완료

□ 추진계획

◦ 금동 대로․공무원교육원진입로 : 2010. 6 준공 (가로등 및 조경)

◦ 서문 ～ 신정(교육청)간 대로  : 국도24호선연결(남원교육청앞도로)

남원여고앞 ․ 조산중로 개설공사

□ 사업개요

◦ 위  치 : 왕정 1교 ～ 남원경찰서 앞 숙호교, 보건소 앞 ～ 조산(요천)

◦ 사업비 : 6,900백만원

◦ 지구별 사업조서                                       (단위 : 백만원)

사업명	구 간	사업량	총 사 업 비			투자 실적 및 계획				비 고
			총 계	공사비	보상비	2008 까지	2009	2010 계획	2011
총 계	2개소	L=2,808m	6,900	4,200	2,700	2,885	800	650	2,565
남원여고앞 중로개설	왕정1교 ～숙호교	L=990m B=20m	4,800	2,900	1,900	2,085	500	450	1,765	2005～ 2011
조산중로개설	보건소앞 ～조산(요천)	L=440m B=15m	2,100	1,300	800	800	300	200	800	2008～ 2011

□ 추진실적

◦ 남원여고 앞 중로(52%) - 35필지 보상협의완료, 옹벽 및 토공

◦ 조산 중로(10%)  -  35필지 보상협의완료, 토공

□ 추진계획

◦ 남원여고 앞 중로 : 왕정2교(여고 앞)～왕정3교(성원고진입) L = 300m

◦ 조산 중로 : 조산(요천) 구간 우․오수, 상수도 및 토공

지리산 선수촌 조성사업

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍 주촌리 일원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2012

◦ 총사업비 : 7,200백만원(2009까지 투자 : 1,569백만원)

- 2010 예산액 : 1,400백만원(국비 1,000 시비400백만원)

◦ 전체공정 : 10%(잔여공정 : 도시계획시설결정용역 완료 후 공사착공)

□ 추진실적

◦ 운천초교 폐교부지(지리산고원레포츠시설사업) 매입 완료  : 2008. 9

◦ 도시관리계획시설(체육시설)결정 용역 추진 중         : 2009. 10 ~

◦ 운천초교 폐교건물 철거 및 부지정리 완료             : 2009. 12

□ 추진계획

◦ 폐교부지 도시관리계획시설(체육시설)결정 용역 완료 : 2010.  3

◦ 실시설계용역                                  : 2010. 4 ~ 5

◦ 공사시행                                      : 2010. 5 ~ 2012. 12

도로명 및 건물번호 부여사업

□ 개    요

◦ 사업대상 : 시 전지역 752.81㎢

◦ 총사업비 : 1,200백만원(국비 293, 도비187, 시비 720)

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2010(4년)

◦ 사업내용 : 도로구간 설정 및 도로명부여, 도로명 DB구축, 안내지도 제작,                    도로명판 및 건물번호판 설치

□ 추진실적

◦ 읍면지역 도로명 부여 및 동지역 도로명 DB정비 완료 : 747구간

- 읍면지역 : 554구간, 동지역 : 193구간

◦ 읍면지역 도로명 시설물 설치추진 : 2009. 1 ~ 2009.12

- 사업량 : 도로명판 830개, 건물번호판 20,809개   - 사업비 : 509백만원

◦ 동지역 도로명 시설물(1차분)정비추진 : 2009. 10 ~ 2010. 3

- 사업량 : 도로명판 420개, 건물번호판 2,738개  - 사업비 : 160백만원

□ 추진계획

◦ 동지역 도로명 시설물(2차분)정비추진 : 2010. 1 ~ 2010. 6

- 사  업  량 : 도로명판 220개, 건물번호판 6,530개

- 소요사업비 : 240백만원

※ 2010년 본예산 : 42백만원 (2010년 1회추경 198백만원 확보건의)

◦ 도로명 주소 홍보 및 고지고시 추진 : 2010. 1 ~ 2010. 12

공간정보 고도화를 위한 GIS 운영

□ 개    요

◦ 위    치 : 시가화 구역

◦ 사 업 량 : A=25㎢ (도로 141.71㎞, 상수도 188㎞, 하수도 294.3㎞)

◦ 기    간 : 2005. 10 ~

◦ 구 축 비 : 4,453백만원 (국비 2,120백만원, 시비 2,333백만원)

◦ 사업내용 : 도로와 지하시설물시스템 구축 운영 및 공간정보 고도화를

위한 시스템의 운영 관리

□ 추진실적

◦ 도로와 지하시설물 구축 및 시스템 운영 관리 : 2005. 5 ~

- 구 축 비 : 4,240백만원 (국비 50%, 시비 50%)

- 구축대상 : 도로, 상․하수도, 광역상수도, 전기시설물 등

◦ 행정업무용 공간정보 DB 자료 갱신 : 수시

- 대상업무 : 연속 지적도 외 7개 업무

□ 추진계획

◦ 시스템 안정적 유지관리를 위한 공간정보시스템 유지보수 실시

- 대 상 : 인트라넷시스템 외 3개 시스템       - 사업비 : 80백만원

◦ 공간정보 최신성 확보를 위한 공간정보시스템 DB 유지 갱신 추진

- 시스템구축 완료후 미갱신 DB 및 항공사진 갱신 등  - 사업비 : 133백만원

◦ 공간정보체계의 구축 및 활용 등에 관한 조례 제정 등 추진

- 국가공간정보에 관한법률 제정에 따른 필요한 사항 규정

□ 문제점 및 대책

◦ 자료의 최신성 확보 및 공간정보 고도화를 위한 GIS 사업예산 부족

⇒  2010년 1회추경 213백만원 확보 건의