2010. 1

주 요 업 무 보 고

건   설   과

목        차

□ 일   반   현   황

□ 2009 주요업무 결산

□ 2010 중점 추진방향

□ 2010 주요업무 계획

◦ 안전하고 편리한 도로유지관리

◦ 읍면지역 시도 확․포장사업

◦ 농어촌도로 확․포장사업

◦ 교통소통 대책사업

◦ 기업유치를 위한 기반시설 확충사업

◦ 오지종합개발사업

◦ 통행불편 마을진입로 정비사업

◦ 수해상습지 개선사업

◦ 하도 준설 사업

◦ 소하천 정비 사업

◦ 하천 유지 관리사업

◦ 소규모 주민숙원사업 추진

일  반  현  황

□ 기    구

												건설과장
												남 정 식
건 설 담 당							토 목 담 당												하 천 담 당										지역개발담당
노 병 욱							진 영 신												김 부 환										조 장 모
도로 유지관리․보수 도로 점․사용허가 지하수 신고․허가 국․공유재산관리 노점상․과적단속							읍면시도확․포장사업 농어촌도로확․포장사업 교통소통대책사업 오지종합개발사업 통행불편 도로사업												치 수 사 업 하천유지관리 골재채취․허가 공유수면관리 하천점․사용허가											소규모 주민숙원사업 포 괄(POOL)사 업 보 조 사 업 소규모시설 유지관리

□ 인    력

구분	계	일 반 직						계약직	기 타 직
		5급	6급	7급	8급	9급	기능	전 임 마 급	계	청경	도로 보수원
정원	28	1	4	7	5	2	7	2	20	8	12
현원	21	-	5	8	3	-	3	2	19	7	12
증감	△7	△1	1	1	△2	△2	△4	-	△1	△1	-

□ 도로현황(2009. 7. 1기준)

(단위 : km)

도로별	노선수	총연장	포 장	포장율(%)	비 고
합 계	838	1,338.6	683.4	51.1
고 속 국 도	1	42.0	42.0	100
국 도	5	120.6	120.6	100
국가지원지방도	2	54.3	54.3	100	전북 96.6%
지 방 도	7	140.6	119.5	85.0	전북 79.1%
시 도	472	174.4	81.8	46.9	전북 66.5%
읍 면 시 도	20	193.9	94.6	48.8	전북 46.1%
농 어 촌 도	331	631.8	173.0	27.4	전북 31.3%

□ 하천현황(2009. 7. 1기준)

(단위 : km)

구 분	개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
			계	개 수	미개수
계	42	283.2	432.9	338.5	94.4	78.2
국가하천	2	36.2	40.1	40.1	-	100
지 방 하 천	40	247.0	392.8	298.4	94.4	75.9	전북 79.0%

□ 소하천 현황(2009. 7. 1기준)

(단위 : km)

총개소	하천연장	개수현황(양안)			개수율 (%)	비 고
		계	개 수	미개수
349	392.1	690.1	440.0	250.1	63.7	전북 21.7%

2009년 주요업무 결산

◦ 도로기능 효율성 제고를 통한 지역소득기반 기틀마련

◦ 철저한 도로유지관리로 시민안전 확보 및 도로환경 개선

◦ 친환경 생태하천 조성으로 자연재해 근원적 예방

□ 불편도로 개선을 통한 지역 균형 발전 및 경쟁력 확보-32개소/10,992백만원

◦ 읍면지역시도 확포장 : 4개소 / 2,931백만원

◦ 농어촌도로 확포장 : 4개소 / 1,150백만원

◦ 교통소통대책 : 2개소/2,500백만원  ◦ 오지종합개발 : 7개소/2,429백만원

◦ 통행불편 마을진입로 정비 : 12개소 / 1,682백만원

◦ 기업유치를 위한 기반시설확충사업 : 3개소 / 300백만원

□ 쾌적하고 안전한 도로유지관리로 시민불편 최소화-29개소/2,231백만원

◦ 위험도로 구조개선 :  2개소 / 574백만원

◦ 도로시설물 유지관리 : 17개소 / 1,157백만원

◦ 주요관문도로 정비 : 10개소 / 500백만원

□ 환경친화적 생태하천 복원으로 자연재해예방-31개소/16,772백만원

◦ 수해상습지개선 : 3개소/6,334백만원 ◦ 하 도 준 설 : 4개소/6,564백만원

◦ 소 하 천 정 비 : 6개소/3,612백만원 ◦ 하천유지관리 : 18개소/262백만원

□ 소규모주민숙원사업 추진-468개소/7,573백만원

	주요성과
◦ 한국의 아름다운 하천 100선 수상(2009. 4. 27) ․주 최 / 주 관 : 국토해양부 / 한국하천협회 - 뱀사골(만수천, 지방하천) : 전국 7위

2010 중점 추진 방향

쾌적하고 안락한 도로 환경 개선

	중 점 과 제
◦ 지역균형 발전 및 소득기반 확충을 위한 체계적 도로망 개설 - 읍면지역 시도 및 농어촌도로 확포장사업으로 소득기반 확충 - 위험도로 및 통행불편도로 정비사업으로 도로환경개선 및 안전도모 ◦ 불법행위 근절을 위한 기초 질서 확립 - 불법 노점, 노상 적치물, 과적위반차량 등 ◦ 안전하고 미래지향 자연친화적 생태하천 조성 - 재해 위험하천 집중 정비로 자연재해 최소화 - 쾌적한 생태 하천 환경 조성 추진

친환경 개발로 시민 삶의 질 향상

2010 주요업무 계획

안전하고 편리한 도로유지관리

□ 개    요

◦ 대상사업 ------------------------------ 2개분야, 9개사업  1,767백만원

∘ 도로시설 관리 사업 --------------------------- 7개사업 - 1,183백만원

- 교량유지관리 보수                             :  75백만원

- 관리도로내 표지판정비                         :  60백만원

- 관리도로내 안전시설물 정비                    :  90백만원

- 도로유지관리 보수                             : 298백만원

- 주요관문도로 시설보수 및 유지관리             : 500백만원

- 시의군도14호선 선형개량(덕과사율)              : 100백만원

- 금지 입암교 재가설                            :  60백만원

∘ 도로유지관리 사업 ------------------------------- 2개사업 - 584백만원

- 교통사고잦은곳 정비사업                       : 110백만원

: 시도22호선(남원대교~신촌동) : 화단형중분대

- 위험도로 구조개선사업                            : 474백만원

: 군도5호선(수지면 남창리) 선형개량외 1개소

□ 추진계획

◦ 실시설계용역발주 :  2010.  1 ～  2월

◦ 사    업    시    행 :  2010.  3 ～ 12월

□ 기대효과

◦ 노후 및 기능 저하된 도로정비로 이용자의 편의증진 도모

읍면지역 시도 확․포장사업

□ 개   요

◦ 총 계획 : 20개노선- 193.9km

- 기 시행(1991～2009년) : 12개노선- 97.5km- 47,997백만원(포장율 50.3%)

◦ 2010시행 : 3개노선- 9.9km- 900백만원(시비 100%)

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사 업 비(백만원)				공정 (%)	사업 기간
				계	기투자	2010	2011이후
합 계		3	9.9	16,000	6,014	900	9,086
계속사업	장교～임리	운봉	4.0	5,000	2,703	300	1,997	54	‘07～’11
	용평～다산	보절	2.3	5,000	1,814	300	2,886	36	‘07～’11
	대신～대신	사매	3.6	6,000	1,497	300	4,203	25	‘07～’11

□ 추진실적

◦ 장교~임리 : ‘07.10월 공사 착수, 장교마을 구간 도로포장(L=1.3km)

◦ 용평~다산 : ‘08. 4월 공사 착수, 도로 순성토 및 종횡배수관 설치

◦ 대신~대신 : ‘08. 4월 공사 착수, 도로 절성토 및 도로 측구설치

□ 추진계획

◦ 계속사업추진(3개소) : 2010 시행분 계약 및 착공 - 2010. 2월

- 장교~임리간 : 도로포장(국도~장동삼거리)

- 용평~다산간 : 도로 측구 및 종횡배수관 설치

- 대신~대신간 : 대신구간 아스콘 일부포장

농어촌도로 확․포장사업

□ 개   요

◦ 총 계획 : 331개노선- 635.8km

- 기 시행(2001～2009년) : 173.5km -64,400백만원(포장율 27.3%)

◦ 2010시행 : 6개노선- 8.6km- 942백만원(시비 100%)

구 분		위 치	사업량(km)	총사업비(백만원)				공정 (%)	사업 기간
				계	기투자	2010	2011이후
합 계		6개소	8.6	10,490	2,074	942	7,474	20
계속	배촌선	주천 배덕	1.6	2,700	1,494	300	906	55	‘07～’11
	송입선	대강 송대	1.6	1,700	290	200	1,210	17	‘08～’11
	자래선	인월 자래	0.7	990	290	200	500	30	‘08～’11
신규	영촌선	주생 영촌	1.8	1,800	-	85	1,715	-	‘10～’12
	산성선	대산 옥율	2.2	2,600	-	115	2,485	-	‘10～’12
	식련선	산동 식련	0.7	700	-	42	658	-	‘10～’11

□ 추진실적

◦ 배촌선 : ‘07. 10월 공사 착수, 교량가설 및 노상작업

◦ 송입선 : ‘09.  3월 공사 착수, 도로 암거 및 횡배수관 설치

◦ 자래선 : ‘09.  3월 공사 착수, 횡배수관 및 노상작업

□ 추진계획

◦ 계속사업 공사(3개소) : 2010 시행분 계약 및 착공 - 2010. 2월

- 배촌선 : L형측구 및 아스콘 포장,

- 송입선 : 횡배수관 및 L형측구

- 자래선 : 횡배수관 및 L형측구

◦ 신규사업 공사(3개소) : 영촌선, 산성선, 식련선

- 실시설계 (‘10. 1월 ~ 4월)

교통소통 대책사업

□ 사업개요

◦ 총 계획 : 38개노선- 59.8㎞

- 기 시행(2009까지) : 4개노선- 4.81㎞- 48,719백만원

◦ 2010시행 : 2개노선- 590m- 1,700백만원(국비 660, 도비 220, 시비 820)

구 분		위 치	사업량(m)	총사업비(백만원)				공정 (%)	사업 기간
				계	기투자	2010	2010 이후
합 계		2개소	590	10,300	6,021	1,700	2,579
계속 사업	이백～운봉간 도로	이백 과립	500	7,700	5,021	600	2,079	65	‘06～’11
	산동 월석교 재가설	산동 월석	90	2,600	1,000	1,100	500	52	‘09~’11

□ 추진실적

◦ 이백~운봉간 도로   : ‘07. 7월 공사 착수, 교량가설 및 기층포장

◦ 산동 월석교 재가설 : ‘09. 6월 공사 착수, 하부구조(교대설치)

□ 추진계획

◦ 계속사업 추진(2개소) : 2010 시행분 계약 및 착공 - 2010. 2월

- 이백～운봉간 도로  : 과립교 설치

- 산동 월석교 재가설 : 교량 슬라브 공사

기업유치를 위한 기반시설 확충사업

□ 개   요

◦ 대상사업 : 2개소 L= 1.9㎞, B= 10m

◦ 총사업비 : 2,450백만원 / ‘10시행 100백만원

사 업 명		읍면	사업량 (㎞)	사 업 비(백만원)				공정 (%)	사업 기간	비 고
				계	기투자	2010	2011이후
합 계		2	1.9	2,450	260	100	2,090
계속사업	가장~가재	운봉	0.7	950	110	50	790	11	‘07～’12	비전 C.C
	월평~신정	덕과	1.2	1,500	150	50	1,300	10	‘07～’11	남원 C.C

□ 추진실적

◦ 가장~가재 : 편입토지 분할측량 완료

◦ 월평~신정 : 용지 매입 중

□ 추진계획

◦ 계속사업 추진(2개소)

- 용지 보상(2개소) : 가장~가재간, 월평~신정간도로

오지종합개발사업

□ 사업개요

◦ 총 계획 : 8개면- 54개소- 15,047백만원

- 기 시행(4차) : 38개소- 12,612백만원(2005 ～ 2009년)

┏ 완  료 : 4개면(덕과, 산동, 인월, 산내) - 5,522백만원

┃

┗ 추진중 : 4개면(수지, 대강, 보절, 아영) - 7,090백만원

◦ 2010시행 : 4개면/9개소- 2,435백만원(균특 : 70%, 시비 : 30%)

면 별	사업량	사 업 비(백만원)				사업 기간
		계	기투자	2010	2011이후
합계	9개소	9,525	7,090	2,435	-
수지	3개소	2,333	1,800	533	-	2010
대강	1개소	2,471	1,931	540	-	2010
보절	3개소	2,402	1,699	703	-	2010
아영	2개소	2,319	1,660	659	-	2010

□ 추진계획

◦ 지역별 사업지구 확정 : 2010. 1월중

◦ 실시설계 용역 : 2010. 1월 ~ 3월

◦ 공 사  입 찰  : 2010.  4월

◦ 계약 및 착공  : 2010.  5월

◦ 공 사  완 료  : 2010. 11월

□ 기대효과

◦ 개발이 낙후된 오지지역의 생산 기반시설 확충

◦ 오지개발사업을 통한 지역간 개발격차 해소

통행불편 마을진입로 정비사업

□ 사업개요

◦ 사 업 량 : 5개소 / 2,460m

◦ 사 업 비 : 525백만원(시비 100%)

구분	사 업 명	위 치	사업량 (m)	총 사 업 비(백만원)
				계	기투자	2010	이후
	합 계	5개소	2,460	4,190	450	525	3,215
계속	연동 진입도로	운봉 장교	840	970	200	100	670
	두곡 진입도로	송동 두신	350	420	100	100	220
	진목 진입도로	보절 진기	900	500	150	200	150
신규사업	장항교 재가설	산내 장항	70	1,800	-	85	1,715
	용담마을 진입로	주천 용담	300	500	-	40	460

□ 추진실적

◦ 연동 진입도로 : ‘09. 4월 공사착수, 소석구간 포장

◦ 두곡 진입도로 : ‘09. 4월 공사착수, 도로절토 및 보조기층 포설

◦ 진목 진입도로 : ‘09. 4월 공사 착수, 플륨관 및 순성토

□ 추진계획

◦ 계속사업 추진(3개소) : 2010 시행분 계약 및 착공 - 2010. 2월

- 연동 진입도로 : 토공 및 종횡배수관 설치

- 두곡 진입도로 : L형측구 및 도로 포장

- 진목 진입도로 : 종횡배수관 및 보조기층 작업

◦ 신규사업(2개소) : 실시설계 (‘10. 1월 ~ 4월)

수해상습지 개선사업

□ 개    요

◦ 총 계획 : 22개지구 82.42km,  90,963백만원

- 기 시행 (2009까지) : 7개지구 22.19km,  40,884백만원(투자율 45%)

지구별	위 치	사업량 (km)	사 업 비 (백만원)				공정 (%)	비고 (사업기간)
			계	기 투자	2010	2010이후
계	3개지구	11.5	18,732	15,117	3,609	-
내척천	향교동	3.9	7,108	6,101	1,004	-	85	‘ 07~ ’10
괴양천	보절 서치	4.2	5,936	4,075	1,858	-	70	‘ 07~ ’10
진기천	보절 진기	3.4	5,688	4,941	747	-	85	‘ 07~ ’10

◦ 2010년 사업 : 3개지구 11.5km, 3,609백만원(국비60%, 도비20%, 시비20%)

□ 추진계획

◦ 공사중 3개소(계속사업)

- 자체설계 및 발주 : 2010.  1월중

- 계약 및 착공 : 2010.  1월

- 공 사 완 료 : 2010. 10월

◦ 2011년 신규사업지구 설계 : 2010. 6 ~ 12

□ 기대효과

◦ 수해상습지 개선으로 농경지보호 및 주민숙원사업 해소

하도 준설 사업

□ 개    요

◦ 총 계획 : 10개지구 45.64km,  45,388백만원

- 기 시행 (2009까지) : 3개지구 17.94km,  15,825백만원(투자율 35%)

지구별	위 치	사업량 (km)	사 업 비 (백만원)				공정 (%)	비고
			계	기 투자	2010	2010이후
계	2개 개소	13.2	34,736	9,000	5,950	19,786
요 천	산동 대기	5.3	17,934	5,470	2,970	9,494	30	‘09 ~ ’12
풍 천	아영 풍천	7.9	16,802	3,530	2,980	10,292	25	‘08 ~ ’11

◦ 2010년 사업 : 2개지구 13.2km, 4667백만원(국비60%, 도비20%, 시비20%)

※ 지방비(시비)미확보 - 1,246백만원

□ 추진계획

◦ 공사중 2개소 (계속사업) : 요천, 풍천

- 자체설계 및 발주 : 2010.  1월

- 계 약  및  착 공 : 2010.  1월

- 공사완료 : 2010. 10월

◦ 신규지구 추가 발주 : 요천, 풍천

- 용역설계추진(요천) : 2010. 2 ~ 6

- 자체설계추진 및 발주(풍천) : 2010. 3

□ 기대효과

◦ 퇴적하도의 정비로 하천관리의 효율성 제고

소하천 정비 사업

□ 개    요

◦ 총 계 획 : 13개지구 31.1km,  38,954백만원

- 기 시행 (2009까지) : 11개지구 16.68km,  14,600백만원(투자율 37%)

◦ 2010년사업 : 4개지구 4.8km, 2,435백만원(국비50%, 시비50%)

지구별	위치	사업량 (km)	사업비(백만원)				공정 (%)	비고
			계	기 투자	2010	2010이후
계	4개 개소	4.8	4,240	1,010	2,435	795	-
비정천	수지 남창	1.2	1,120	60	600	460	-	신규
구지천	아영 월산	1.6	1,570	500	800	270	-	신규
산덕천	운봉 산덕	1.1	550	-	550	-	-	신규
산재천	송동 송내	0.9	1,000	450	485	65	-	신규

□ 추진계획

◦ 설계완료 : 2009. 12월

◦ 감정평가 완료 보상 착수 : 2009. 12월

□ 추진계획

◦ 용지보상 : 2010.  1월중

◦ 사업  발주 : 2010.  1월중

- 용지보상과 병행하여 사업 추진

□ 기대효과

◦ 미개수소하천 정비로 침수지역 해소 및 지역주민 불편사항 해소

하천 유지 관리사업

□ 개    요

◦ 소하천 유지관리사업(하상준설)

- 대  상 : 23개 읍면동 349개 소하천 L= 392.1km

- 사업비 : 665백만원

- '10년 계획 : 사업량 7개소(L = 4.95km) / 사업비 100백만원

◦ 하천기성제 정비사업

- 대  상 : 국가하천 2개소 L= 36.2km, 지방하천 1개소 L = 5.0km

- 사업비 : 122백만원

□ 추진계획

◦ 소하천 유지관리사업 : 2010. 1 ~ 6

- 기 설계 완료, 농번기 이전 공사 완료 추진

◦ 하천기성제 정비

- 상반기 : 2010.  4. 1 ~  4. 20 (춘향제 이전 정비 완료)

- 하반기 : 2010. 10. 1 ~ 10. 30

□ 기대효과

◦ 시설물정비, 수목제거 등 기성제 관리로 사전재해예방 도모

소규모 주민숙원사업 추진

□ 사업개요

◦위    치 : 23개 읍․면․동

◦사업내용 : 마을진입로, 안길, 농로, 하수구, 마을회관, 모정 등 소규모시설

사업구분	계		시설비		민간자본		비고
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
합계	464	9,818	348	7,104	116	2,714
읍면동숙원사업	178	4,098	133	3,054	45	1,044
포괄(POOL)사업	115	2,300	69	1,380	46	920
면 자체사업	110	1,100	110	1,100
국․도비보조사업	50	1,500	25	750	25	750
유지관리사업	10	120	10	120
세전~남창간교량가설	1	700	2009년 300(도비), 2010년 400(시비)				L=100m

◦총사업비 : 464개소 9,818백만원

□ 추진계획

◦지역경제 활성화를 위한 재정조기집행으로 사업조기발주 추진

◦주민의견 수렴 및 설계반영으로 민원사전예방

◦포괄(POOL)사업비 집행계획수립 연중 추진

◦세전~남창간 교량가설공사 - 2010년 2월 발주 예정

□ 기대효과

◦주거환경개선 및 주민편익도로 쾌적한 정주생활권 보장

◦주민복지시설정비로 복지향상 및 지역경제 활성화 도모